2005.  6

第103回 益山市議會(臨時會)

- 上半期 推進實績 및 下半期 推進計劃 -

主要業務 推進狀況 報告

建設交通局

報 告 順 序

□	一 般 現 況	□	03
□	都 市 開 發 課	□	11
□	建 設 課	□	39
□	住 宅 課	□	79
□	交 通 行 政 課	□	105
□	車 輛 登 錄 事 業 所	□	125
□	特 殊 施 策	□	139

一   般   現   況

																						건 설 교 통 국
																																							5과, 1사업소, 26담당
	도 시 개발과											건 설 과											재난안전 관 리 과							주 택 과												교 통 행정과													차량등록 사 업 소
도 시행정		도시계획	도시개발		보 상		도시관리				건설행정		도로관리		토목		도로 시 설	하천				지역협력		재난관리	복구지원		민방위		주택행정			주택관리	건 축물관리			건축민 원		건축지원			교통행정			교통관리		차량			교통지도		교 통 운영					관리	등록

(정원/현원)

구 분	정원	현원	증감	직 급 별
				4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능	계약
계	161	159	□2	1 1	6 5	26 26	41 36	30 24	11 20	46 46	0 1
도시개발과	27	29	2	1 1	1 1	5 6	11 8	6 3	1 7	2 3
건 설 과	39	49	10		1 1	5 5	7 11	5 6	5 5	16 21
재난안전 관 리 과	20	3	□17		1 0	4 3	6 0	3 0	2 0	4 0
주 택 과	33	35	2		1 1	5 5	10 7	10 12	3 6	4 4
교통행정과	31	31	0		1 1	5 5	5 6	4 3	0 2	16 13	0 1
차량등록사업소	11	12	1		1 1	2 2	2 4	2 0	0 0	4 5

□기타 : 80명(수로원 20, 일용9,청경4,공익47)

□ 행     정     구     역  :  507.057□

□ 도시지역(도시계획구역) : 70.472□(행정구역의 13.9%)

□익산 도시계획구역 : 69.133□

□주거지역 : 16.958□          □상업지역 :  1.675□

□공업지역 :  5.857□          □녹지지역 : 44.643□

□삼례 도시계획구역(왕궁) : 1.339□

□ 관리지역 : 210.963□( 41.6%)   □ 농림지역 : 208.240□(41.1%)

□ 자연환경보전지역 : 17.382□( 3.4%)

□ 도  로 : 총연장 1,077.6□    포장연장 579.3 (포장율 53.8%)

□고속·일반국도 : 100%, 지방도 : 76.4%  □시·군도 : 70.2% , 농어촌도로 : 29.8%

□ 하  천 : 총 286.6□   90개소(개수율 43.8%)

□국 가 하 천 : 32.2□(100%)            □지방1급하천 : 6.6□(100%)

□지방2급하천 : 149.6□(59.6%)           □소  하  천 : 98.2□(2.6%)

□ 주  택 : 총가구수 110,585    주택수 105,083동(보급율 95.0%)

□단독 44,824동(42.6%) □공동 58,954(56.1%) □다세대 1,305(1.3%)

□주택보급율 : 전북96.0%(전주89.8,군산91.8,정읍98.1,김제99.5,남원101.6)

□ 합    계  :  100,784대

□승  용  :  67,691대(관용  93    자가용 65,651   영업용 1,947)

□승  합  :   7,488□( □   54      □    6,915     □    519)

□화  물  :  25,413□( □  194      □   23,009     □   2,210)

□특  수  :    192□ ( □   13      □       71     □     108)

□ 2004년 12월말현재 : 99,822대(0.9%증) □ 월평균 192대 증가

□ 합    계     :    134개업체  4,620대

□버  스  :  시내  3개업체 175대   전세 14개업체 308대

□택  시  :  회사 14 □    691□            개인 948대

□용  달  :  회사  6 □     13□            개인 427□

□화  물  :  일반 62 □    1,273□              개별 477□

□렌트카  :  16개업체  278대

□장의차  :  19  □     30□

□ 합           계   :    321개업체

□매   매   업 :  44개업체      □폐 차 업     : 5개업체

□정   비   업 : 268    □       □번호판제작소 : 4 □

2005豫算 執行 實績

【 기준 : 2005. 5. 31 현재 】

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	집행액	잔 액	%	비 고
계	계	99,566	37,617	61,949	37.8
	경상예산	4,097	1,434	2,663	35.0
	사업예산	95,469	36,183	59,286	37.9
도시개발과	계	21,340	9,104	12,236	42.7
	경상예산	290	74	216	25.6
	사업예산	21,050	9,030	12,020	42.9
건 설 과	계	46,381	20,022	26,359	43.2
	경상예산	1,955	789	1,166	39.5
	사업예산	44,426	19,233	25,193	43.3
주 택 과	계	5,512	1,962	3,550	35.6
	경상예산	1,074	313	761	29.1
	사업예산	4,438	1,649	2,789	37.2
교통행정과	계	26,028	6,435	19,593	24.7
	경상예산	568	201	367	35.4.
	사업예산	25,460	6,234	19,226	24.5
차량등록 사 업 소	계	305	94	211	30.8
	경상예산	210	57	153	27.1
	사업예산	95	37	58	39.0

2005 上半期成果및反省

□ 성     과

□ 도시개발사업을 통한 도시균형발전과 주민생활 편익증대에 기여

□ 도시가로망확충 88개사업,  46.8□,  25,852백만원

□ 지방하천기본계획 수립후(시비부담)하천정비사업요구로

296억원 예산절감효과 거양 (시비부담20%)

□ 강경천 : 26.0km, 721억원 소요 예상 (절감예상액 :144억원)

□ 어량천 : 18.6km, 760억원 소요 예상 (절감예상액 :152억원)

□ 불법노점상 · 노상적치물 및 불법광고물에 대한 지속적인

단속 실시

□ 불법광고물 :  72,544건(현수막 2,827, 벽보 65,040, 기타 4,677)

□ 노상적치물 :  단속 2,533건(수거 183건)

□ 노  점  상 :  단속 3,625건(수거  52건)

□ 건축설계 민원실 운영으로 봉사하는 건축행정상 정립 : 157건

□건축신고용 설계도서 무료작성 :  31건

□건축물 현황도면 작성 및 민원상담  : 126건

□ 농촌 주택건설 기술지원팀 운영으로 주민편익 도모

□농어촌 주택 기술지원반 편성 :  3개반 9명

□농가주택 계획상담 및 지도 :21읍면동 20명

□시공중인 농가주택 순회 기술지원 및 지도

: 21읍면동 1회

□ 교통체계개선을 위한 지능형교통시스템(ITS)설치 추진

□ITS기본계획 용역 완료

□투융자심사 및 국가예산 확보: 42억(국비32억, 시비10억)

□ 교통질서 확립 계도 및 단속으로 준법정신 함양

□불법주·정차 지도단속 :  8,502건, 349백만원

□ 민·관합동 야간단속 중점실시(월1회□2회)

□불법 주·정차 금지구역 표지판 일제점검 : 559개소

□주·정차금지구역 확대지정 : 6개노선 2.2□

□기존 90개노선 96.76□ □ 96개노선 98.96□

□사업용차량 불법운행 지도·단속 :  25건,  4,750천원

□ 반    성

□ 지능화·다양화 및 생계형 불법행위 (불법노점상,불법광고물)

에 대하여 강력한 단속 및 행정처분 미흡

□ 예산 부족으로 적기 보상 협의 및 공사준공 지연

□ 불법건축물 사전예방 홍보 및 고질상습위반자 과태료

(이행강제금) 징수실적 미흡

□ 도로변 불법 주·정차 근절과 주차난해소를 위한 주차장 확보대책 미흡

2005主要業務推進狀況

□	都 市 開 發 課
□	建 設 課
□	住 宅 課
□	交 通 行 政 課
□	車 輛 登 錄 事 業 所

都 市 開 發 課

□ 一   般   現   況

□ 2005 豫算執行實績

□ 2005 上半期 成果 및 反省

□ 2005 主要業務推進狀況

一    般    現    況

□ 기    구

																							도 시 개 발 과 장
도 시 행 정 담 당													도 시 계 획 담 당												도 시 개 발 담 당				보 상 담 당					도 시 관 리 담 당
□국및과소관행정의종합기획 □ 일반사업 예산편성 정산 □ 건 설 공 사 추 진 보고 □ 전 문 건 설 업 등 록 □전문건설업양도양수인가처리 □ 전문건설업 전국DB화 추진 □ 보 안 업 무 관 리 □ 시 특 법 관 련 업 무 □ 과 문 서 이 관 및 처 리													□ 국 토 이 용 계 획 수 립 변 경 결 정 □ 제 2 종 지 구 단 위 계 획 수립 □ 도 시 기 본 계 획 수 립 □ 도 시 관 리 계 획 수 립 및 결 정 □ 도 시 계 획 시 설 결 정 및 변 경 □ 도 시 계 획 지 구 지 정 □ 근 린 공 원 조 성 계 획 수 립 □ 도 시 계 획 관 련 업 무 확 인 및 협 의 □ 도 시 계 획 위 원 회 운 영												□ 도 시 계 획 도 로 개 설 사 업 추 진 (설 계 , 시 공 , 감 리 , 평 가 , 품 질 관 리 ,기 술 개 발 , 공 사 감 독, ,공 사 시 행 절 차 등) □ 자 전 거 도 로 의 계 획 수 립 시 행 □ 양 여 금 사 업 추 진 □ 도 시 개 발 사 업 특 별 회 계 관 리 □ 소 도 읍 가 꾸 기				□ 국 소 관 사 업 의 용 지 매 입 지 장 물 보 상 □ 협의 매입 불응 토지 지 장 물 수용재결 □ 매입토지 관리이전 촉 탁 등 기 □ 토 지 , 건 물 수 용 확 인 서 발 급 □ 기 타 사 업 시 행 보 상 관 련 업 무 전 반					□ 미 집 행 도 시 계 획 시 설 단 계 별 집 행 계 획 수 립 및 관 리 □ 단 계 별 집 행 계 획 수 립 □ 대 지 보 상 매 수 청 구 □ 도 시 계 획 시 설 사 업 실 시 계 획 인 가 □ 사 업 시 행 자 지 정 □ 도 로 · 공 원 등도 시 계 획 사 업 실시계획 인 가 협 의 □개발행위허가및협의 □ 토 지 형 질 변 경 , 토 석 채 취 등 □개발행위건축협의 □ 도 시 통 계 작성

□ 정□현원

구 분	계	4 급	5 급	6 급	7 급	8 급	9 급	기능
정 원	27	1	1	5	11	6	1	2
현 원	29	1	1	6	8	3	7	3
과부족	2	-	-	1	□3	□3	6	1

□ 국토의 용도구분

(단위 : □, %)

구 분	총 면 적	고 시 면 적				비 고
		도시지역	관 리 지 역	농림지역	자연환경 보존지역
면 적	507.057	70.472	210.963	208.240	17.382
비 율	100	13.9	41.6	41.1	3.4

□ 도시지역내 용도지역

(단위 : 천□, %)

구 분	계	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	비 고
면 적	70,472	17,038	1,675	5,857	45,902
비 율	100	24.2	2.4	8.3	65.1

□ 도시지역내 용도지구

(단위 : 천□)

지구명	미관지구		방화지구	고도지구	자연취락 지 구	문화자원 보존지구	비 고
	중심지	일 반
지구수	8개지구	10개지구	9개지구	20개지구	77개지구	1개지구
면 적	146	578	1,202	1,290	2,159	202

□ 도시계획도로

(단위 : □,천□, %)

구 분	개설계획			개 설			미 개 설			개설율
	노선수	연 장	면 적	노선수	연장	면 적	노선수	연 장	면 적
계	1,096	390	6,306	713	275	5,021	383	115	1,285	80.0
광로	4	12	813	3	10	720	1	2	93	88.5
대로	42	84	2,389	25	71	2,011	17	13	378	84.2
중로	165	102	1,584	116	81	1,270	49	21	314	80.2
소로	885	192	1,520	569	113	1,020	316	79	500	67.1

□ 도시공원

(단위 : 천□)

구 분	계	근린공원	어린이공원	묘지공원	조성계획수립	비 고
개 소	63	32	30	1	63
면 적	5,015	4,605	65	345	5,015

□ 전문건설업 현황

□ 업 체 별 : 351개업체(일반전문 251, 가스 53, 난방 47)

□ 업 종 별

(2005. 05. 31)

계	일 반 전 문								가스	난방
	소계	철콘	상하	토공	금속(철물,창호)	석공	포장	기타
584	477	156	109	40	41	24	16	91	60	47

2005 상반기 성과 및 반성

□ 성    과

□ 도시개발사업을 통한 도시균형발전과 주민생활 편익증대에 기여

□ 도시가로망확충 88개사업,  46.8□,  25,852백만원

□ 장기미집행 도시계획시설 단계별집행계획수립 시행으로 지역발전과 민원해결

□ 미집행시설 : 338개 5.887□ (5,055억원)

□ 적극적인 행정지도로 전문건설업 시장 안정기여

□ 351개업체 - 행정처분 1개업체(포장공사업)

□ 보상 협의매수 불응자 토지수용 재결처분으로 정상적인 공사추진

□ 2개 노선,  23건 수용(산업도로2공구, 영신선 도로개설)

□ 반    성

□ 일부노선 보상 예산 부족으로 적기 보상 협의 지연

□ 도로개설 요구는 많으나 소요예산 부족으로 민원해결 지연

2005 豫算執行實績

(2005. 5. 31현재)                                              (단위 : 천원)

세항	세세항	목	예 산 액	집 행 액	잔 액	비 율	비고
총 계			21,339,515	9,103,926	12,235,589	42.7
소 계			14,168,488	5,186,050	8,982,438	36.6
도 시 개 발 관 리	경 상 예 산	인 건 비	152,606	37,515	115,091	24.6
		일 반 운 영 비	87,814	19,168	68,646	21.8
		국내여비	32,400	11,100	21,360	34.3
		기관운영 업 무 추 진 비	3,000	780	2,220	26.0
		시책추진업 무 추 진 비	10,800	4,000	6,800	37.0
		부서운영 업 무 추 진 비	3,600	1,400	1,200	38.9
	사업예산 (자체)	시 설 비	13,869,443	5,104,344	8,765,099	36.8
		시 설 부 대 비	7,825	7,743	82	99.0
		자 산 및 물 품 취 득 비	1,000	0	1,000	0
소 계			3,226,000	42,694	3,183,306	1.3
도 로 개 설	사업예산 (자체)	시 설 비	3,217,314	42,544	3,174,770	1.3	제1회 추경
		시 설 부 대 비	8,686	150	8,536	1.7	제1회 추경
소 계			3,945,027	3,875,182	69,845	98.2
도 로 개 설	사업예산 (보조)	시 설 비	3,879,027	3,809,492	69,535	98.2
		감 리 비	66,000	65,690	310	99.5

2005主要業務推進狀況

	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	2005 도시개발분야 주요사업 추진상황 도시기본계획 및 도시관리계획수립 장기미집행도시계획시설집행계획 배 산 택 지 개 발 계 획 공 익 사 업 을 위 한 보 상 도 시 개 발 사 업 추 진(총괄) 하 나 로 개 설 산 업 도 로 (2공구) 개 설 배 산 로 개 설 학 곤 선 도 로 개 설 석 방 육 교 진 입 도 로 개설 부 평 로 개 설 황 등 중 로 (2차) 개 설 익 산 도 수 로 정 비

2005 도시개발분야 주요사업 추진상황

	총 88개사업 25,852백만원
□ 이 월 사 업 □□□□ 32개사업 6,344백만원 □명 시 이 월 □□□□ 28개 □ 5,947 □ □사 고 이 월 □□□□ 4개 □ 397 □ □ 2005년 사 업 □□□□ 56개 □ 19,508 □ □교 부 세 사 업 □□□□ 3개 □ 10,693 □ □자 체 사 업 □□□□ 53개 □ 8,815 □

□ 주요 사업 내용

□ 도시기본계획 및 도시관리계획수립

□ 장기미집행도시계획시설 집행계획

□ 배산택지개발계획, 공익사업을 위한 보상

□ 도시개발사업 추진 :  하나로 외 87개사업(25,852 백만원)

□ 추진실적

□ 총 사 업 :  88건  25,852백만원

□ 완    료 :   3건    306백만원( 3.4%)

□ 추 진 중 :  85건  25,546백만원(96.6%)

(용지매입 : 29건    4,297백만원)- 추진중 건수의 34.1%

도시기본계획 및 도시관리계획수립

도·농 균형발전과 미래지향적인 도시로의 성장을 위하여 중·장기발전 전략인 도시기본계획과 실천계획인 도시관리계획 수립

□ 사업개요

□ 대상지역 : 행정구역 전역(507.057□)

□ 사업내용 : 도시기본계획수립, 도시관리계획수립, 토지적성평가

□ 과업기간 : □03. 11. 18 ∼ □06. 11. 17(3년간)

□ 도 급 액 : 1,177백만원 (□03:450, □04:170, □05:300, □06:257)

□ 용역회사 : (주)삼안기술공사  임 종 아

□ 2005년 계획 - 470백만원

□ 도시기본계획(안) 마무리 및 행정절차 이행 : 170백만원(□04년 명시이월)

□ 도시관리계획입안 : 300백만원(미확보)

□ 상반기 추진실적

□ 도시기본계획(안) 마무리 : 중간보고 2회(3. 22, 5. 26)

□ 용도지역, 도로망, 단계별 개발계획 등

□ 하반기 추진계획

□ 도시기본계획 행정절차 이행 및 전라북도 신청

□ 공청회, 시의회 의견 청취, 시도시계획위원회 자문

□ 도시관리계획 입안

□ 자료 및 현황분석

□ 용도지역 배분계획

□ 문제점 및 대책

□ 도시관리계획 용역비(3억) 미확보로 2006년까지 마무리 어려움

□ 제2회 추경 또는 □06년 예산에 반영

장기미집행 도시계획시설 집행계획

□ 개    요 (총  괄)

(단위:백만원)

시설명	시설수	면적(□)	총사업비	공사비	보상비
계	383	5,887,100	505,576	169,507	336,069
도 로	338	1,282,338	276,283	112,600	163,683
공 원	21	4,067,646	190,102	49,421	140,681
녹 지	14	476,722	33,698	6,301	27,397
광 장	9	42,140	3,940	1,185	2,755
운 동 장	1	17,374	1,600	0	1,533

□ 현        황

□대지매수청구대상 : 311개 시설 196,000□,  74,400백만원

□매수청구접수 : 21건  2,529□ 800백만원

□매수청구결정 : 20건 2,490□ (2004년 11건, 2005년 9건)

□ 감 정 평 가 : 11건 1,176 □  600백만원

□ 협의매수 : 6건 758 □  212 백만원

□ 예 산 : 800백만원( □04년이월300,  □05년 500백만원)

□ 상반기 추진실적

□매수청구결정 : 2005. 05 (9건 1,330□)

□매수청구에 따른 매수여부 통지 : 2005. 05 (9건 1,330□)

□ 하반기 추진계획

□지적분할 및 지장물 조사 (9건  1,330□) : 2005. 06

□감정평가 및 매수통보 : 2005. 07

□협의 매수 : 2005. 07 ∼ 12

□ 특이사항

□대지보상은 아니나 장기미집행도시계획시설로 국민고충처리위원회의        권고민원 8건13,872□ 800백만원 예산 미확보로 행정불신과 집단민원        발생 예상

배 산 택 지 개 발 계 획

미개발지역에 대하여 새로운 시가지를 조성함으로서 시의 균형발전 및

쾌적한 주거환경 제공으로 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

□ 위    치 : 모현동, 송학동, 현영동, 오산면 장신리 일원

□ 면    적 : 744천□(225천평)

□ 사업기간 : 2003 ∼ 2008년

□ 사 업 비 : 1,476억원(□05예산 50억, □06이후 1,426억) - 토지공사 자체자금

□ 수용인구 : 15,205명(5,430세대)

□ 시 행 청 : 한국토지공사 전북지사

□ 2005년 계획 - 50억(개발계획 및 실시계획 승인)

□ 상반기 추진실적

□ 개발계획 승인신청(토지공사 □ 전라북도)   -----   2005. 2. 4

□ 개발계획 승인(전라북도)                   -----   2005. 5. 31

□ 하반기 추진계획

□ 실시계획 사전협의(토지공사 □ 익산시)     -----   2005. 9

□ 실시계획 승인신청(토지공사 □ 전라북도)   -----   2005. 11

□ 실시계획 승인(전라북도)     -----------------   2005. 12

□ 2005년 이후 추진계획

□ 보상 착수     ---------------------------     2006. 1

□ 공사 착수     ---------------------------     2006. 3

□ 공사 준공     ---------------------------     2008. 12

공익사업을 위한 보상

□ 현    황

□  사 업 계 획    :  78사업   /  4,553필지 /  1,235,579□   41,905백만원

□ 2005 계 획    :  78사업   /  1,653필지 /    292,348□    9,221백만원

□ 상반기 추진실적     ------------------------   79%

□  누 계 실 적    :  78사업   /  3,089필지 /    957,275□   30,498백만원(77%)

□ 2005 상반기실적    :  78사업   /   629필지 /    143,093□    5,160백만원(48%)

□ 수 용 재 결    :  2개노선  23필지  5,716□ ( 17명)

- 산업도로2공구 -   6필지 1,209□ ( 3명)

- 영   신   선  -  17필지 4,507□ (14명)

□ 하반기 추진계획

□ 하반기 보상추진 계획  :  78사업   /  1,024필지 /  149,255□   4,061백만원

□ 보상협의 독려반 편성운영 : 2개반 18명

□ 협의기간내 미협의자 개별방문 및 면담으로 집중독려(보상팀, 공사감독)

□ 보상협의 불응시 사업 초반부터 토지수용재결 신청 적극활용

□ 보상행정서비스센타 설치 지속운영

□ 종중, 단체규약, 계약관련구비서류(13종)등 작성안내 편의제공

□ 소액보상자, 노약자, 장애인등 현지방문 보상민원 처리

□ 원거리거주자(서울,경기등) 왕복우편이용 보상협의계약 대행처리

2005 도시개발사업 추진

◑ 2004년도 이월사업 추진

(단위:m, 백만원)

사 업 명	개 요	사업기간	예 산 액		이월 사유	비 고
			2004예산	이월액
계 (32건)	L=18,973		11,654	6,344
하 나 로 개 설 (5·6차분)	L=6,647 B=30.5	1997. 3~ 2006. 12	4,839	1,803	계속 사업	공사중 : 계속비이월 (2005. 6 준공예정)
산 업 도 로 개 설 (1차분)	L=2,565 B=8∼25	2000. 8~ 2005. 12	500	500	□	공사중 : 계속비이월 (2005. 6 준공예정)
배 산 로 개 설 (1차분)	L=1,000 B=25	2000. 10~ 2006. 12	338	237	□	공사중 : 명시이월 (2005. 7 준공예정)
함열보건소∼ 중학교간 개설	L=580 B=6~8	2003. 10~ 2007. 12	200	200	시기 미도래	지장물조사중
동산동 망산 진입로 개 설(1차분)	L=636 B=15	2002 3~ 2006. 12	200	95	□	공 사 중 (2006. 12. 준공예정)
어양동부송택지 옆 도로개설	L=220 B=8	2004 3~ 2005. 12	50	28	□	공 사 중 (2005. 12. 준공예정)
금마면사무소 옆 도로개설	L=280 B=12	2003 3~ 2006. 12	200	113	□	실시설계용역중
신중앙시장∼ 금호회관간	L=112 B=6	2002. 3~ 2005. 12	200	69	□	공사착공 (2005. 6월)
동산동 삼성아파트 옆 도로개설	L=215 B=10∼20	2003 3~ 2006. 12	100	25	□	용지 보상중 보상24%(미매입8/1,537□)
동산동운용마을 진입로 개설	L=350 B=8	2004. 3~ 2006. 12	120	107	□	감정평가 의뢰
마동7통도로개설	L=200 B=8	2004 3~ 2006. 12	200	67	□	용지 보상중 보상43%(미매입 7/848□)
하이트 소주공장 우회 도로개설	L=250 B=10	2003 3~ 2006. 12	150	47	□	용지 보상중 보상43%(미매입 3/1,211□)
남중동 원주아파트 도로개설	L=70 B=6	2002 3~ 2006. 12	100	51	□	용지 보상중 보상85%(미매입 5/ 92□)
국민생활관 옆 도로개설	L=110 B=6	2003 3~ 2006. 12	100	7	□	용지 보상중 보상69%(미매입 4/ 325□)

(단위:m, 백만원)

사 업 명	개 요	사업기간	예 산 액		이 월 사 유	비 고
			2004예산	이월액
금마초교 옆 개설	L=270 B=8	2002 3~ 2005. 11	200	132	시기 미도래	공 사 중 (2005년 11월 준공예정)
남중 신일아파트 옆 도로개설	L=150 B=6	2002. 10~ 2005. 8	150	136	□	공 사 중 (2005년 8월 준공예정)
모현 생수목욕탕 옆 도로개설	L=220 B=8	2003. 3~ 2006. 12	200	22	□	용지 보상중 보상95%(미매입5/ 49□)
모현 항가메 진입로 개설	L=280 B=6	2003. 3~ 2005. 12	100	27	□	토지매입 협의중
모현 우림아파트 옆 도로개설	L=130 B=6	2003. 3~ 2005. 12	100	91	□	공 사 착 공 (2005년 6월)
남중 이화아파트 옆 도로개설	L=210 B=8	2001. 3~ 2005. 12	300	170	□	공 사 준 공 (2005년 3월)
송학동 망기마을 진입로 개설	L=420 B=8	2003. 3~ 2006. 12	200	99	□	용지 보상중 보상80%(미매입14/534□)
황등 중로 확· 포장공사(2차)	L=1,530 B=15	2004 3~ 2008. 12	50	50	□	감정평가 의뢰
석방육교 진입로 개설(1차)	L=260 B=15	2001 6~ 2005. 12	500	313	□	공 사 중 (2005년 5월 준공)
영등동 송내마을 진입로 개설	L=380 B=8	2000. 10~ 2006. 12	150	66	□	타절준공 미매입 토지 협의중
어양 도수로 도로 정비	L=620 B=20	2004. 5~ 2006. 12	335	302	□	공 사 중 (2006년 12월 준공예정)
어양 공원 주변정비	L=620 B=20	2004. 5~ 2006. 12	720	720	□	□
송학동 역골 주거환경개선사업	A=4,340□	2004. 3~ 2006. 12	300	300	□	공 사 중 (2006년 4월 준공예정)
도시기본계획 및 관리계획수립	A=507.05□	2004. 3~ 2005. 12	170	170	□	용 역 중
소라산~현대아파트간	L=500 B=8~10	2000. 10~ 2006. 12	281	163	□	공 사 중 (2006. 10. 준공예정)
모현동 번영학원 옆	L=40 B=8	2004. 3~ 2006. 12	80	74	□	용지 보상중 보상52%(미매입5/124□)
송학동 현대아파트옆	L=120 B=6	2002. 3~ 2005. 12	171	125	□	공사시기 미도래 및 토지매입 협의중
상수도보호구역에 저촉 되는공원시설부지매입비	2필지 7,749□		350	35	□	토지매입협의중

◑ 2005년도 사업추진

(단위 : m,  백만원)

구 분	사 업 명	사 업 개 요	사 업 기 간	총 사업비	기투자	2005 투 자	금 후 투 자	공 정(%)		비 고
								공사	보상
합 계	56개 사 업	L=27,820		137,743	69,254	19,508	48,981
교부세 사 업	3 개 사 업	L=10,212		72,175	50,149	10,693	11,333
	하 나 로 개 설 (7차분)	L=6,647 B=30.5	1997. 3~ 2006. 12	58,000	40,329	7,640	10,031	73	98	공사중
	산 업 도 로 개 설 (2차분)	L=2,565 B=8∼25	2000. 8~ 2005. 12	8,675	5,940	2,735		65	100	□
	배 산 로 개 설 (2차분)	L=1,000 B=25	2000. 10~ 2006. 12	5,500	3,880	318	1,302	45	100	□
자체 사업	53개 사 업	L=17,608		65,568	19,105	8,815	37,648
	함열시장진입로	L=50 B=6	2004. 3~ 2005. 12	300	80	180	40		81	공사착공(6월)
	함 열 천 주 교 옆	L=270 B=8	2004. 3~ 2006 12	500	100	100	300		57	용 지 보상중
	함열보건소 ∼중학교간	L=580 B=6~8	2003. 10~ 2007. 12	700	250	100	350			지장물조사
	함열읍사무소 ∼현대연립간	L=410 B=8	2002. 3~ 2006. 12	600	100	220	280		77	공사착공(6월)
	황등중로(1차)	L=905 B=15	2001. 1~ 2005. 6	2,420	2,300	80	40	98	100	신호등 설 치
	황등중로(2차)	L=1,500 B=15	2004. 3~ 2008. 12	4,300	35	450	3,815			감정평가의뢰
	금마시장진입로	L=290 B=6	2002. 3~ 2006. 12	830	300	100	430		77	공사착공(6월)
	금마면사무소 옆	L=280 B=12	2003. 3~ 2006. 12	1,003	400	200	403		78	실 시 설계중
	금마초교 옆	L=250 B=6~8	2002. 3~ 2005. 11	450	300	150		15	98	공사중
	춘포사거리∼ 춘포역간	L=200 B=12	2003. 10~ 2006. 12	800	149	250	401		57	용지 보상중
	동산동 동산교회 ∼ 평동선간	L=400 B=6	2003. 3~ 2006. 12	1,200	610	150	440		94	□
	동산동 삼성APT옆	L=215 B=10~20	2003. 3~ 2006. 12	1,016	100	300	616		24	□
	동산동 망산진입로	L=636 B=15	2002. 3~ 2006. 12	2,800	1,800	100	900	75	90	공사중

(단위 : m,  백만원)

구 분	사 업 명	사 업 개 요	사 업 기 간	총 사업비	기투자	2005 투 자	금 후 투 자	공 정(%)		비고
								공사	보상
자체 사업	마동7통 도로개설	L=200 B=8	2004. 3~ 2006. 12	650	200	150	300		43	용 지 보상중
	마동 하이트소주 공장 우회도로	L=250 B=10	2003. 3~ 2006. 12	855	200	200	455		43	공사착공 (7월)
	마동 동서로 ∼ 마동선간	L=530 B=10	2002. 3~ 2006. 12	1,363	420	200	743		82	□
	남중동 원주APT옆	L=70 B=6	2003. 3~ 2006. 12	500	200	100	200		85	용 지 보상중
	남중동 이화APT옆	L=200 B=12	2002. 3~ 2005. 12	1,007	907	100		100	94	잔 여 토지매입
	남중동 국민생활관옆	L=110 B=6	2003. 3~ 2006. 12	615	400	215			69	용 지 보상중
	남중동 전북기계 공고 뒤	L=250 B=8	2004. 3~ 2006. 12	950	100	100	750		15	□
	남중동 신중앙시장 ~금호회관간	L=112 B=6	2002. 3~ 2005. 12	650	550	100		10	100	공사착공 (6월)
	구 모현동사무소옆	L=560 B=8	2004. 3~ 2006. 12	1,500	80	100	1,320		17	용 지 보상중
	모현동 보은목욕탕옆	L=200 B=6	2002. 3~ 2006. 12	950	870	80		100	95	잔 여 토지매입
	모현동 고현초교 진입로	L=120 B=8	2003. 3~ 2005. 12	230	80	150		10	100	공사착공 (6월)
	송학동 학곤선 개설	L=1,400 B=25	2003. 10~ 2007. 12	8,000	430	400	7,170	10	72	용지 보상중
	송학동 영광교회옆	L=100 B=6	2002. 3~ 2005. 12	950	900	50		100	95	잔여 지장물매입
	석방육교진입로	L=260 B=15	2001. 6~ 2005. 12	2,100	1,700	400		70	57	공사중
	어양동 궁동진입로	L=100 B=8	2004. 3~ 2006. 12	980	300	300	380		55	용지 보상중
	어양동 부송택지옆	L=340 B=10	2004. 3~ 2005. 12	600	50	100	450	30	100	공사중
	어양동 도수로정비	L=620 B=20	2004. 5~ 2006. 12	5,500	2,655	700	2,145	15	95	□
	부송동 부평로개설	L=1,500 B=25	2002. 8~ 2008. 12	6,839	1,739	300	4,800		80	용지 보상중
	송학동 역골주거환경개선 사업 도시계획시설 부지매입	A=4,340□	2004. 3~ 2006. 12	2,000	300	100	1,600	30	70	공사중
	함열 동지산입구	L=340 B=6~8	2005. 1~ 2007. 12	500		50	450			지장물 조사

(단위 : m,  백만원)

구 분	사 업 명	사 업 개 요	사 업 기 간	총 사업비	기투자	2005 투 자	금 후 투 자	공 정(%)		비고
								공사	보상
자체 사업	오산선∼산업도로 연결도로	L=80 B=6	2005. 3~ 2005. 12	100		100		20		공사중
	영등동 동부상설 시장뒤 외 3개노선	L=320 B=6~8	2005. 3~ 2007. 12	700		250	450			지장물조사
	중앙동 대일학원옆	L=120 B=6	2005. 3~ 2007. 12	500		150	350			□
	동산동 옥야초등 학교 통학로	L=125 B=1.5	2005. 1~ 2005. 4	70		70	0	100		공사준공 (2005. 4)
	동산동 옥야초등 학교 진입로	L=60 B=12	2005. 3~ 2006. 12	500		200	300			용지 보상중
	영등동 청아아파트 옆 외 3개노선	L=600 B=6~8	2005. 3~ 2007. 12	950		100	850			지장물조사
	남중동 시민문화회관 ~기계공고간	L=300 B=8~15	2005. 1~ 2007. 12	990		100	890			도시계획변경
	영등동 보람주유소∼ 은혜교회옆 외 2개노선	L=395 B=8~10	2005. 3~ 2007. 12	800		100	700			지장물조사
	동양제과∼현대공업사 도로확포장	L=100 B=6	2005. 3~ 2006. 12	700		100	600			□
	영등동 성서침례교회 ∼산업도로옆 외 2개노선	L=440 B=8~10	2005. 3~ 2007. 12	750		100	650			□
	모현동 명일아파트옆	L=360 B=15	2005. 3~ 2007. 12	2,100		100	2,000			□
	모현동 18통도로개설	L=130 B=6	2005. 3~ 2006. 12	500		100	400			□
	부송동 산업도로∼ 부송주공APT간	L=130 B=8	2005. 3~ 2006. 12	800		300	500			□
	미해결 도시계획도로개설 (동산초 외 2개소)	L=110 B=25	2005. 5~ 2006. 12	500		200	300			설계 용역중
	팔봉동 기안아파트옆	L=50 B=20	2005. 5~ 2005. 12	150		150				지장물조사
	어양동 궁동초교 인도개설	L=100 B=3	2005. 5~ 2005. 8	50		50				공사중
	송학동 망기마을 진입로	L=420 B=8	2003. 3~ 2006. 12	950	300	100	550			용지 보상중
	영등동 라인아파트 뒤	L=50 B=8	2005. 5~ 2006. 12	200		100	100			지장물 조사
	모현동 우림아파트 옆	L=130 B=6	2003. 3~ 2006. 12	500	200	70	230			공사착공(6월)
	어양동사무소 진입로	L=120 B=8	2005. 5~ 2005. 12	100		100				설계중

하나로개설

□ 사업개요

□ 사 업 명 : 하나로 개설공사

□ 위    치 : 영등동 영등택지 ∼ 삼기면 서두리(지방도 718호)

□ 사 업 량 : L=6,647m,  B=30.5m

□ 사 업 비 : 58,000백만원 (보상 14,417·공사 43,583) - 양여금, 시비

□기 투 자  40,329 (□04 : 6,425) - 보상 14,000·공사 26,329

□2005투자   7,640 (보상 417·공사 7,223)

□2006이후  10,031 (공사)

□ 사업기간 : 1997. 3 ∼ 2006.  12

□ 시공회사 : 삼성물산(주) 이상대외 2개업체

□ 감리회사 : (주)수성엔지니어링 김 석 환

□ 2004까지 추진실적       □□□□□□□        공정 73%

□ 보    상    (14,000백만원)

□편입용지 및 지장물보상(826필지 376,018□중 772필지 369,459□) - 98%

□ 공    사    (26,329백만원)

□도로축조(L=6,647m), 교량가설(임상교, 중리교), 포장포설(기층 L=2,500m)

□ 2005 추진계획

□ 보    상  (417백만원) :  54필지 6,559□

□ 공    사 (7,223백만원) :  영등동~각동교차로 포장(L=3.7km)

□ 상반기 추진실적

□ 5·6차분 공사 준공  :  2005. 6

□ 2005년 예산확보 : 7,640백만원 (교부세 3,820 · 시비 3,820)

□ 하반기 추진계획

□ 하나로~백제로(L=1,200m) 연결 설계용역    :  2005.  8

□ 교통시설·가로등 설치(신호등 4·가로등 297)  :   2005. 10

□ 영등동~각동 교차로 부분개통(L=3,700m)   :  2005. 11

□ 중리교  가설(상판 76m)  :  2005. 12

□ 2006년도 사업 마무리 될수 있도록 사업비 확보요망

산업도로(2공구)개설

□ 사업개요

□ 사 업 명 : 산업도로 개설공사(2공구)

□ 위    치 : 신동 새한주유소∼국도23호 석수문교 □ (대로3류 및 시도1198호)

□ 사 업 량 : L=2,565m □ 새한주유소∼용수로   (L= 900m, B=25m)

□ 용수로 ∼ 국도23호선 (L=1,665m, B=8m)

□ 사 업 비 : 8,675백만원 (보상 3,869·공사 4,806) - 양여금, 시비

□기 투 자 5,940 (□04 : 500) - 보상 3,569·공사 2,371

□2005투자 2,735 (보상 300·공사 2,435)

□ 사업기간 : 2000. 8 ∼ 2005.  12

□ 도 급 자 : (유)아산종합건설  한 기 수

□ 그간 추진실적          □□□□□□□           공정 65%

□ 보    상 (3,869 백만원)

□새한주유소∼국도23호선  :  128필지 36,244□ 매입완료 (100%)

□ 공    사 (2,371 백만원)

□새한주유소∼용수로

- 도로축조(새한주유소~용수로) :  L=900m, B=25m

- 구조물공 (암거설치 1개소 45m, 오.우수관 L=1,708m)

- 포장포설 완료 :  L=900m

□ 하반기 추진계획

□ 공    사 (2,435 백만원)

□새한주유소∼용수로

- 교통시설물 설치 (L=900m)   :  2005.  6 ∼  7

- 보도 및 자전거도로포장 (L=1,800m)   :  2005.  6 ∼  7

□용수로∼국도23호선(시도1198호)

- 도 로 축 조(L=1,665m, 33,946□)   :  2005. 6 ∼  7

- 배수공(횡배수관 122m, 수로관 1,336m)   :  2005. 8 ∼  9

- 포   장   포   설      완   료    :  2005. 9 ∼ 12

□공   사   준   공 (L = 2,565m)         :  2005. 12

배산로개설

□ 사업개요

□ 사 업 명 : 배산로 개설공사

□ 위    치 : 어양 쌍용아파트 ∼ 부송동 전화국  (대로3류1호선)

□ 사 업 량 : L=1,000m,      B=25m

□ 사 업 비 : 5,500백만원 (보상 3,123·공사 2,377) -  양여금, 시비

□기 투 자  3,914 (□04 : 338) - 보상 3,123·공사 791

□2005투자    318 (공사)

□2006이후  1,268 (공사)

□ 사업기간 : 2000.  10 ∼ 2006.  12

□ 도 급 자 : (유)신풍건설  양 용 문

□ 그간 추진실적         □□□□□□□          공정 45%

□ 보    상  : 64필지 17,781□        □□  완료

□ 공    사

□도      로      축      조    : L=755m, B=25m

□우□오수관부설  : L=2,153m

□암거 설치(2.5□1.5m) 설치 : L=46.5m

□보조기층 포설(t=30cm) : L=500m

□ 금후 추진계획

□ 2005년도 추진 (318백만원)

□도로축조 및 L형측구설치(L=1,000m) :  2005.  7

□아스콘포장(L=490m, B=25m)  :  2005.  8

□가로등  설치 (48등)  :  2005.  8

□ 2006년도 추진 (1,268백만원)

□보조기층 포설(L=500m) :  2006.  7

□아스콘포장(L=510m, B=25m)  :  2006.  8

□공   사   준   공(L=1,000m) :  2006. 12

□ 2006년도 사업 마무리 될수 있도록 사업비 확보요망

학곤선 도로개설

□ 사업개요

□ 사 업 명 : 학곤선 도로개설공사

□ 위    치 : 송학동 이화아파트 ∼ 오산면 상하마을 (대로3류7호선)

□ 사 업 량 : L=1,400m,     B=25m

□ 사 업 비 : 8,000백만원  (보상비 3,039,  공사비 4,961) - 시비

□기 투 자  430 (보상)

□2005투자  400 (보상 200·공사 200)

□2006이후 7,170 (보상 2,409·공사 4,761)

□ 사업기간 : 2003.  10  ∼  2007.  12

□ 2004까지 추진실적

□ 토지매입 : 49필지 18,360□ 중 22필지 5,132□ 매입   □□  30%

□ 상반기 추진실적 (400백만원)

□ 보    상 : 16필지 889□ 매입(200백만원)

□ 공    사

□ 입    찰 : 2005. 5. 17 (시공자 : 여정건설(주) 대표 김 수 완)

□ 하반기 추진계획

□ 공    사  (200백만원)

□오산 광양마을 입구 포장공사 (L=60m, B=25m)  :  2005. 6 ~ 12

□ 문 제 점

□ 2005년분 보상비 (200백만원) 보상완료, 예산부족으로

잔여토지 매입불가  □ 4필지 346□, 건축물 2동

석방육교 진입도로개설

□ 사업개요

□ 사 업 명 : 석방육교 진입로 개설공사 (중로2류)

□ 사 업 량 : L=260m,  B=15m

□ 사 업 비 : 2,100백만원 (보상 1,487, 공사 613)  - 시비

□기 투 자 1,700 (보상 1,387, 공사 313)

□2005투자   400 (보상 100, 공사 300)

□ 사업기간 : 2001.  6   ∼   2005.  12

□ 도 급 자 : (합)군장종합건설  채 승 석

□ 그간 추진실적 (1,700백만원)      □□□      공정 70%

□ 보    상    (1,387백만원)

□토지매입 :  36필지 8,264□중 31필지 5,149□ 매입 - 57%

□ 공    사    (313백만원)

□도로축조 :  L=260m, B=15m

□L형옹벽 설치 :  L=180m, H=2~5m

□우□오수관부설 :  L=431m

□상수도관 부설 :  L=355m

□보 강 토 옹 벽 :  L=121m

□ 추진계획 (400백만원)

□ 보    상    (100백만원)

□잔여토지 매입(5필지 3,115□) :  2005. 7

□ 공    사    (300백만원)

□인  도   설  치 (L = 420m)    :  2005. 6

□도 로 포 장 및 부대공사(L = 260m)   :  2005. 7

□공     사      준     공     :  2005. 7

부 평 로 개 설

□ 사업개요

□ 위    치 : 원팔봉 삼거리 ∼ 부송동 망산마을 (대로3류14호선)

□ 사 업 량 : L=1,500m,      B=25m

□ 사 업 비 : 6,839백만원  (보상비 2,839,  공사비 4,000) - 시비

□기 투 자 1,739  (보상 1,699·공사 40)

□2005투자   300  (보상)

□2006이후 4,800  (보상  840·공사 3,960)

□ 사업기간 : 2002.  8 ∼ 2008.  12

□ 그간 추진실적          □□□□□□□          보상 80%

□ 보    상

□토지매입 : 94필지 40,182□중 77필지 31,974□ 매입

□ 공    사

□실시설계 용역 완료 :  2003. 12

□ 추진계획

□ 보    상(300백만원)  □ □ □ □ □□ □□  제1회추경확보

□잔여토지 매입추진 □ □ □ □ □□ □□  17필지 8,208□

황등중로(2차)개설

□ 사업개요

□ 사 업 명 : 황등중로(2차) 개설공사

□ 위    치 : 황등면 황등역 ∼ 황등면 신정마을

□ 사 업 량 : L=1,500m,     B=15m

□ 사 업 비 : 4,300백만원  (보상비 1,566,  공사비 2,734) - 시비

□기 투 자   35 (분할측량)

□2005투자  450 (보상)

□2006이후 3,815 (보상 1,081·공사 2,734)

□ 사업기간 : 2004.  3  ∼  2008.  12

□ 2004까지 추진실적

□ 행정절차 이행  :  35백만원

□편입토지 분할 및 지장물 조사 :  61필지 17,200□

□ 하반기 추진계획

□ 보    상    (450백만원)

□감정평가 및 편입토지 보상 (61필지 17,200□):  2005. 6 ∼ 12

익산 도수로 정비

□ 사업개요

□ 사 업 명 : 익산도수로 정비사업

□ 사 업 량 : L = 620m, B = 20m

□부지 면적 : 28,613□(농업기반공사 : 24,385□, 건교부 :4,228□)

□ 사 업 비 : 5,500백만원(보상 2,700·공사 2,800)

□기 투 자 2,655 (보상 2,117·공사 538) - 교부세 2,320·시비 335

□2005투자  700 (보상 583·공사 117)

□2006이후 2,145 (공사)

□ 사업기간 : 2004. 5 ∼ 2006. 12

□ 2004까지 추진실적

□ 보    상    (2,500백만원)    □□□□□□□    95%

□토지매입 :  20필지 26,844□중 14필지 25,619□ 매입

- 기반공사 :  9필지 19,953□ 매입완료

- 사유토지 : 11필지  6,891□중 5필지 5,666□ 매입

□토지감정평가 결정통보(대상토지 20필지 26,844□) :  2004. 9

□시설물 용도폐지 승인 : 2004. 8. 5(도청 □ 기반공사전북본부)

□ 상반기 추진실적

□ 실 시 계 획   인 가   :  2005. 2 ∼ 3

□ 1차분 공사착공 :  2005. 3. 30

□ 농업기반공사 목적외 사용승인 :  2005. 5. 16

□ 하반기 추진계획

□ 보    상 (사유토지 보상협의 : 6필지 1,225□) : 2005. 7~ 12

□ 배 수 공 (암거 L=116m, 오수관 L=288m)  :  2005.  8

□ 토    공 (노체순성토 : 63,500□)  :  2005. 11

□ 2006년도 사업 마무리 될수 있도록 사업비 확보

建    設    課

□ 一   般   現   況

□ 2005 豫算執行實績

□ 2005 上半期 成果 및 反省

□ 2005 主要業務推進狀況

一    般    現    況

□ 기 구

						건 설 과
건설행정			도로관리			토 목			도로시설			하천관리
□과서무 □국공유재산관리 □옥외광고물관리 □과적차량단속 □하천점용허가 □골재채취업등록 □도로점용료징수			□도로유지관리 □노점상□노상 적치물정비 □가로등보안 등유지관리 □도로표지관리 □도로보수관리			□교량가설 □교량유지관리 □주민숙원사업 추진 □오지종합개발			□시군도확포장 사업 □지방도관리 □농어촌도로확 포장사업 □철도 건널목 □위험도로개선			□하천및소하천 정비 □수해상습지 개선 □하천□제방관리 □골재채취허가

□ 정□현원

구 분	계	4 급	5 급	6 급	7 급	8 급	9 급	기능
정 원	39	-	1	5	7	5	5	16
현 원	49	-	1	5	11	6	5	21
과부족	10	-	-	-	4	1	-	5

□ 도로보수원 : 21명(노점성단속3, 가로등 작업지원3, 중앙지하도1, 과적1, 광고물1, 재난관리1, 도로보수 11)

공 익 요 원 : 25명(과적7, 광고물6, 노점상1, 재난관리5, 방재6)

					재난안전관리과
지역협력			재난관리									복구지원				민방위
□지역안전관리 종합계획수립 □시안전대책 위원회및사고 대책본부구성 □안전문화정착 교육홍보 □재난상황실운영			□재난관리시설 안전점검 □재난예방사업 □대형사고예방 □교량터널의 안전진단									□풍수해피해 상황총괄 □풍수해 및복구공사 설계감독 □배수펌프장관리 □재해경감대책 협의회및내진 설계심의위원회운영

□ 정□현원

구 분	계	4 급	5 급	6 급	7 급	8 급	9 급	기능
정 원	20	-	1	4	6	3	2	4
현 원	3	-		3
과부족	□17		□1	□1	□6	□3	□2	□4

□ 청경 : 4명(배수펌프장 2개소)

□ 도로 현황

(단위:km)

구 분	총 연 장		포 장 도		미개설도		포장율 (%)
	노 선	연 장	노 선	연 장	노 선	연 장
합 계	362	1,077.6	159	579.3	203	498.3	53.8
고속국도	1	17.3	1	17.3			100
일반국도	5	76.2	5	76.2			100
지 방 도	11	173.4	7	132.5	4	40.9	76.4
시 군 도	93	289.7	78	203.3	15	86.4	70.2
농어촌도	252	521.0	72	155.4	180	365.6	29.8

전 북 도		6,092.7		4,317.5		1,431.7	70.9

□ 교량 현황

(단위:개소)

관 리 청	계	고속도로	국 도	지방도	시군도	농어촌도로	비고
계	148	9	32	17	35	55
도로공사	9	9	-	-	-	-
국도유지	20	-	20	-	-	-
도로관리사업소	17	-	-	17	-	-
익 산 시	102	-	12	-	35	55

□ 하천 현황

(단위:km)

구 분	총 연 장		정비대상 (제방)	개수연장 (제방)	미개수연장 (제방)	개수율 (%)
	개 소	연 장
합 계	90	286.6	553.2	242	311.2	43.8
국가하천	3	32.2	38.3	38.3		100
지방1급하천	3	6.6	21.5	21.5		100
지방2급하천	26	149.6	297	177	120	59.6
소 하 천	58	98.2	196.4	5.2	191.2	2.6

도 내	2,966	6,526	10,088	4,191	5,897	41.54
일반하천	491	3,228	4,434	2,718	1,716	61.2
소 하 천	2,475	3,298	5,654	1,473	4,181	26

□ 방재시설물 현황

(단위:km)

구 분	계	관 리 기 관			비고
		익산시	농업기반공사
			군산지사	익산지사
계	249	181	39	29
하천·제방	32	32	-	-
양·배수장	12	2	2	8
수 문	50	10	19	21
저 수 지	146	128	18	-
육교·교량	9	9	-	-

□ 가로등·보안등 현황

(단위:주)

구 분	설치등수	사용등수	격등수	비 고
계	21,448	19,382	2,066
가 로 등	6,018	4,487	1,531
보 안 등	15,430	14,895	535

□ 현수막 게시대 ·벽보판 현황

계		현 수 막 게 시 대		벽 보 판		비고
개소	면수	개소	면수	개소	면수
162	263	99	164	63	99

2005 豫算執行 實積
(2005. 5. 31)							(단위:천원)
세항	세세항	목	예산액 (A)	집행액 (B)	잔 액 (C)	비 율 (B/A)□100	비 고
총 계			46,380,952	20,022,206	26,358,746	43.2
2005년 예산			30,677,985	10,278,346	20,399,639	33.5
소 계			1,919,934	1,178,668	741,266	61.4
하 천 관 리	경상적 경 비	일 반 운영비	3,100	0	3,100	0
	보 조 사 업	시설비	1,019,457	495,289	524,168	48.6
		시 설 부대비	2,957	1,400	1,557	47.4
	자 체 사 업	시설비	894,420	681,979	212.441	76.2
소 계			4,054,.526	2,318,199	1,736,327	57.2
재 해 대 책	경상적 경 비	일 반 운영비	139,811	60,604	79,207	43.4
		국 내 여 비	3,000	1,000	2,000	33.3
	보 조 사 업	시설비	3,242,911	1,621,350	1,621,561	50.0
		시 설 부대비	8,756	3,385	5,371	38.7
	자 체 사 업	시설비	114,400	90,319	24,081	78.9
		재료비	2,007	0	2,007	0
		자 산 취득비	2,100	0	2,100	0
	기 타	예비비등	541,541	541,541	0	100

(2005. 5. 31)									(단위:천원)
세항	세세항	목	예산액 (A)	집행액 (B)		잔액 (C)		비율 (B/A)□100		비 고
소 계			14,916,072	6,734,277		8,181,795		45.2
건 설 행 정	인건비	수 당	164,014	64,527		99,487		39.3
		일 용 인부임	573,215	184,425		388,790		32.2
		일시사역 인부임	18,840	1,373		17,467		7.3
	경상적 경 비	일 반 운영비	938,182	445,358		492,824		47.5
		국 내 여 비	51,280	27,000		24,280		52.7
		시책추진 업무추진	800	400		400		50.0
		기타업무 추 진 비	4,340	2,170		2,170		50.0
	보 조 사 업	시설비	2,312,072	1,056,036		1,256,036		45.7
		시 설 부대비	4,928	1,000		3,928		20.3
	자 체 사 업	재료비	150,970	71,805		79,165		47.6
		시설비	10,683,639	4,871,493		5,812,146		45.6
		시 설 부대비	7,392	7,300		92		98.8
		자 산 취득비	1,400	1,390		10		99.3
	기 타	배상금등	5,000	0		5,000		0
소 계			7,816,000	21,000		7,795,000		0.3
시군도 확포장	보 조 사 업	시설비	7,515,212	20,000		7,495,212		0.3
		시 설 부대비	18,788	1,000		17,788		5.3
		감리비	282,000	0		282,000		0

(2005. 5. 31)							(단위:천원)
세항	세세항	목	예산액 (A)	집행액 (B)	잔액 (C)	비율 (B/A)□100	비 고
소 계			1,780,000	0	1,780,000	0
농어촌 도 로 확포장	보 조 사 업	시설비	1,773,614	0	1,773,614	0
		시 설 부대비	6,386	0	6,386	0
소 계			191,453	26,202	165,251	13.7
재 난 관 리	인건비	수 당	51,243	0	51,243	0
		일시사역인 부 임	1,820	1,818	2	99.9
	경상적 경 비	일 반 운영비	16,196	2,000	14,196	12.4
		일 반 보상금	10,810	630	10.180	5.8
		국 내 여 비	16,000	0	16,000	0
		시 책 추 진	530	0	530	0
		부 서 운 영	2,400	0	2,400	0
	보 조 사 업	재료비	1,950	1,754	196	89.9
		시설비	35,190	0	35,190	0
	자 체 사 업	자 산 취득비	55,314	20,000	35,314	36.2
소 계			15,702,967	9,743,860	5,959,107	62.1
이 월 사 업	명시이월		10,972,666	5,486,560	5,486,106	50.0
	사고이월		4,730,301	4,257,300	473,001	90.0

2005 上半期 成果 및 反省

□ 성    과

□ 지방하천기본계획 수립 후(시비부담)하천정비사업요구로

296억원 예산절감효과 거양 (시비부담20%)

□ 강경천 : 26.0km, 721억원 소요 예상 (절감예상액 :144억원)

□ 어량천 : 18.6km, 760억원 소요 예상 (절감예상액 :152억원)

□ 불법노점상 · 노상 적치물 및 불법광고물에 대한 지속적인 단속 실시

□ 불법광고물 :  72,544건(현수막 2,827, 벽보 65,040, 기타 4,677)

□ 노상적치물 :  단속 2,533건(수거 183건)

□ 노  점  상 :  단속 3,625건(수거  52건)

□ 시군도 확·포장 및 주민숙원사업의 조기발주 추진

□ 공사조기발주 :  181  건  21.083백만원

□ 반    성

□ 지능화·다양화 및 생계형 불법행위(불법 노점상, 불법광고물)에 대하여 강력한 단속 및 행정처분 미흡

2005 主要業務推進狀況

	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	2005 건 설 분 야 사 업 추 진 상 황 시·군 도 확·포 장 사 업 농 어 촌 도 로 확 포 장 사 업 도 로 확· 포 장(자 체,보조) 사 업 오 지 종 합 개 발 사 업 주 민 숙 원 사 업 도 로 유 지 관 리 사 업 도 로 장 비 운 영 계 획 가 로·보 안 등 유 지 관 리 삼 기 마 동 교 재 가 설 검토 호남선 철도건널목 입체화사업 중 앙 지 하 도 보 수 공 사 불법노상·적치물 노점상 정비단속 옥 외 불 법 광 고 물 정 비 소 하 천 정 비 사 업 산 북 천 수해 상습지 개선사업 하 천 기 본 계 획 수 립 재난관리대상시설 안 전 점 검 기초생활보장수급세대가스시설개선사업

2005 건설분야 사업추진 상황

	총 263개 사업 39,931백만원
□ 2005년 사 업 □□□□ 185개사업 24,229백만원 □ 이 월 사 업 □□□□ 78개사업 15,702백만원

□

□완    료 :   90개  사업     6,669백만원 ( 16.7 %)

□추 진 중 : 172개  사업   33,226백만원 ( 83.3 %)

□ 균 형 있 는 지 역 개 발 ▒ 223건 31,668백만원 중 완료 88 건 6,000백만원 (18.9%)
□	시·군 도 확·포 장	:	7노선	□□□□□□□□□□□□□□	11,214	백만원
□	농어촌도로 확·포장사업	:	7노선	□□□□□□□□□□□□□□	4,109	□
□	도로 확·포장(자체·보조)사업	:	53노선	□□□□□□□□□□□□□□	10,892	□
□	오 지 종 합 개 발 사 업	:	2개소	□□□□□□□□□□□□□□	787	□
□	주민숙원·생활편익 사업	:	154개소	□□□□□□□□□□□□□□	4,666	□
□ 도로 및 교량유지관리 ▒ 17건 2,139백만원 중 완료 1 건 200백만원 ( 9.3%)
□	도 로 유 지 관 리	:	7개소	□□□□□□□□□□□□□□	947	백만원
□	가로등·보안등 유지 관리	:	4개소	□□□□□□□□□□□□□□	406	□
□	교 량 유 지 관 리	:	2개소	□□□□□□□□□□□□□□	106	□
□	호 남 선 철 도 건널목 입체화	:	3개소	□□□□□□□□□□□□□□	180	백만원
□ 중앙지하도보수공사 : 1개소 □□□□□□□□□□□□□□ 500 백만원 □ 가로환경정비 (불법 노상적치물, 노점상, 불법광고물)

□ 재해 예방 및 대책 ▒ 18건 5,518백만원 중 완료 1 건 500백만원 ( 9.0%)
□	소하 천 정 비 사 업	:	14개소	□□□□□□□□□□□□□□	1,762	백만원
□	산 북 천 수 해 상 습 지 개 선	:	1개소	□□□□□□□□□□□□□□	3,251	□
□	하천기본계획수립	:	3개소	□□□□□□□□□□□□□□	505	□

□ 재난대비 예방활동강화 : 2개 사업(2) □□ 36백만원
□	재난대상시설 안전 점검	:	578개소	□□□□□□□□□□□□□□	비예산사업
□	기 초 생 활 보 장 수 급 세 대 가 스 시 설 개 선 사 업	:	153세대	□□□□□□□□□□□□□□	36	백만원
□ 기 타 사 업
□	민 사 소 송 토 지 매 입 외 2 개 사 업	:	□□□□□□□□□□□□□□		570	백만원

시·군 도  확·포장 사업

□ 사 업 개 요

□ 2005년 사업 -- 7개노선 : 연장 12.81km   ---   11,214백만원

[ 이월: 3,417백만원  □05 예산 : 7,797백만원(제1회 추경 편성) ]

□ 이 월 사 업 : 신성∼삼산간,  오산∼지경,  원오산∼인수

□ 교부세 사업 : 안천∼춘팔, 하단∼맹동, 온수∼시대, 용연∼서두

□ 사업기간 : 2005. 1  ∼  2008년

□ 사업비 재원기준 - 교부세 50%,  시비 50%

□ 상반기 추진실적

□ 제1회 추경예산 반영 사업추진  -------  7,797백만원

□ 토지보상 협의 : 4개 노선 -------------  49%

□ 안천∼춘팔(88%), 하단∼맹동(30%),  온수∼시대(78%),

□ 신성∼삼산(감정평가 의뢰)

□ 공 사   추 진 : 2개 노선    ----------  60%

□용연∼서두(80%) : 구조물 및 보조기층 포설 및 다짐

□원오산∼인수(40%) : 토공 및 구조물 시공

□ 공 사   완료 : 1개 노선    ----------  2005. 5월

□오산∼지경(군도2호) 도로 확·포장공사

□ 하반기 추진계획

□ 토지보상 완료 : 1개 노선

□신성∼삼산

□ 토지보상 협의 : 3개 노선 -------------  80%

□ 안천∼춘팔, 하단∼맹동,  온수∼시대

□ 공 사   추 진 : 2개 노선    ----------  80%

□원오산∼인수 : 구조물 및 보조기층 포설 및 다짐

□용연∼서두 : 보·차도 경계석 및 L형 측구 시공

시·군도 확·포장사업 내역

□ 총 7개 사업  -  12.81km  -  11,214백만원

구분	위치	사 업 명	사 업 개 요 (Ｏｑ,m)	사업기간	총 사 업 비					사업 구분	공정 (%)	비고
					계	기투자	2004 이월	2005	금후 투자
계		7개노선	L=12.81		49,649	2,323	3,417	7,797	36,112		61% 토지:49% 공사:73%
							명:2,069 사:1,348
교 부 세 □ 계 속 □	소계	4개 노선	L=9.39		47,644	1,664	2,241	7,797	35,942
							명:1,729 사: 512
	춘포	판문∼용남간 (안천-춘팔)	L=2.02 B=8	□03 - □08	3,824	545	242	280	2,757	용지	토지 88%	19호
							명: 242
	낭산	황등∼어량간 (하단-맹동)	L=1.57 B=8	□04 - □08	2,360	290	702		1,368	용지	토지 30%	9호
							명: 226 사: 476
	왕궁	온수∼시대간	L=1.2 B=8	□04 - □08	1,460	365	174	60	861	용지	토지 78%	21호
							명: 138 사: 36
	삼기	용연∼서두간	L=4.6 B=30.5	□04 - □07	40,000	464	1,123	7,457	30,956	공사	공사 80%	31호
							명:1,123
이월	소계	3개노선	L=3.42		2,005	659	1,176		170
							명: 340 사: 836
	성당	신성∼삼산간	L=0.5	□04 - □05	200	5	195			용지	감정평가의뢰	3호
							명: 195
	오산	오산∼지경	L=0.9 B=8	□03 - □05	1,096	576	520			공사	완료	2호
							명: 145 사: 375
	춘포	판문∼용남간 (원오산-인수)	L=2.02 B=7	□03 - □06	709	78	461		170	공사	공사 40%	19호
							사: 461

농어촌도로 확·포장 사업

□ 사 업 개 요

□ 2005년 사업  :  7개 노선  L= 9.77km  -----   4,109백만원

[ 이월 : 2,336백만원    □05예산 : 1,773백만원(제1회 추경 편성) ]

□ 이월사업 - 쌍능∼금마, 상양진입로, 후정선, 대덕선

□ 교부세 사업 - 용연선, 고창선, 연명∼하양

□ 사업기간 : 2005. 1  ∼  2008년

□ 사업비 재원기준(잠정) - 교부세 50%,  시비 50%

□ 상반기 추진실적

□ 제1회 추경예산 반영 사업추진   -------     1,773백만원

□ 토지보상 협의  :  4개  노선   ----------   35%

□ 고창선(48%), 연명∼하양(토지조서작성),  대덕선(15%), 용연선(78%)

□ 공 사   추 진  :  3개 노선  -----------  53%

□ 쌍능∼금마 : 공사중지(문화재 보호구역 협의 중)

□ 상양진입로 : 보조기층 포설 및 다짐

□ 후정선 : 토공 및 구조물 시공

□ 하반기 추진계획

□ 토지보상 협의 : 3개 노선 -------------80%

□ 고창선, 연명∼하양,  대덕선

□ 공 사   추 진 : 4개 노선 -------------80%

□ 쌍능∼금마 : 타설 준공(배수로 정비)

□ 상양진입로 : 아스콘 포장(기. 표층), 준공

□ 후정선 : 보조기층 포설 및 다짐

□ 용연선 : 토공 및 배수공 시공

농어촌도로 확·포장사업 내역

□  7개노선  9.77km --- 4,109백만원

구분	위치	사업명	사 업 개 요 (km, m)	사업 기간	총 사 업 비					사업 구분	공정 (%)	비고
					계	기투자	2004 이월	2005	금 후 투 자
계		7개노선	L=9.77		12,809	3,007	2,336	1,773	5,693		44% 토지:35% 공사:53%
							명:1,991 사 345
교 부 세 □ 계 속 □	소계	3개노선	L=4.67		8,173	1,454	549	1,773	4,397
							명: 519 사: 30
	오산	용 연 선	L=1.2 B=20	□03 - □08	4,784	795	197	1,473	2,319	공사	토지 78%	농 도 301호
							명: 197
	용동	고 창 선	L=2.77 B=8	□03 - □08	2,916	648.	352		1,916	용지	토지 48%	면 도 104호
							명: 322 사: 30
	여산	연 상 선 (연명∼하양)	L=0.7 B=6	□04 - □08	473	11		300	162	용지	토지조서작성	농 도 301호
이월	소계	4개노선	L=5.1		4,636	1,553	1,787		1,296
							명1,472 사: 315
	금마	서 오 선 (쌍능∼금마)	L=1.7 B=8	□04 - □05	1,310	600	710			공사	공사 30%	리 도 202호
							명: 395 사: 315
	여산	연 상 선 (상양진입로)	L=1.0 B=8	□04 - □05	972	508	464			공사	공사 80%	농 도 301호
							명: 464
	황등	후 정 선	L=1.1 B=8	□04 - □05	1,054	400	464		190	공사	공사 50%	농 도 302호
							명: 464
	춘포	대 덕 선	L=1.3 B=8	□04 - □08	1,300	45	149		1,106	용지	토지 15%	농 도 304호
							명: 149

도로 확·포장 자체 및 보조 사업

□ 사 업 개 요

□ 2005년 사업 :  53개 노선  연장 55.76km  ---- 10,892백만원

□ 자체 사업 :  42개 노선 (L=45.11km) -----  7,557 □

( 이월 : 3,224백만원    □05예산 : 4,333백만원 )

□ 보조 사업 :  11개 노선 (L=10.65km)  ----  3,335 □

( 이월 : 1,905백만원    □05예산 : 1,430백만원 )

□ 사업기간 : 2005. 1  ∼  12월

□ 상반기 추진실적

□ 용역 추진 --------완료2건, 시행중2건, 미발주1건

□성당∼외수, 군도·농도도로망 및 지형도 : 완료

□용성철도건널목입체화, 원팔봉~공설운동장외1개소 중앙분리대:시행중

□농어촌도로기초자료, : 미발주

□ 토지보상 협의 : 28개 노선 ---시행중18건, 준비중(감정평가,토지조서)10건

□ 오산 모산선 외 27개 노선

□ 공사 착공 및 추진 : 20개 노선---시행중 14건 , 미착수6건

□ 신기 ~ 동련 외 19개 노선

□ 하반기 추진계획

□ 실시설계 용역 추진 : 3개 노선 ---------  8월까지 완료

□ 토지보상 협의 : 27개 노선

□군도·농도도로망 및 지형도 외 2개 노선 제외

□ 공사 착공 및 추진 : 20개 노선 --- 착공 6건, 계속 14건

□ 연내 완공 9개 노선

자 체 사 업 내 역

□  42개노선  45.11km   ----------    7,557백만원

구분	위치	사업명	사업 개요 (km, m)	사업기간	총 사 업 비					사업 구분	공 정 (%)	비고
					계	기투자	2004 이월	2005	금 후 투 자
합 계		42개노선	L=45.11		46,480	7,457	3,224	4,333	31,466		31%
							명:2,210 사:1,014
자 체 □ 계 속 □	소계	31개노선	L=36.21		37,270	5,819	1,492	4,333	25,626		27% 토지:40% 공사:15%
							명:1,001 사: 491
	오산	모 산 선 (신모선)	L=1.7 B=6.5	□04 - □08	1,800	30		100	1,670	용지	감정평가의뢰
	오산	장신∼만석	L=1.6 B=8	□04 - □08	1,480	55		100	1,325	용지	토지 5%
	오산	영 만 선	L=1.8 B=8	□03 - □08	1,950	37	63	100	1,750	용지	토지 5%
							사: 63
	황등	신기∼동련	L=1.3 B=8	□03 - □07	1,095	369	116	461	149	공사	공사 10%
							명: 59 사: 57
	함라	다은∼갈마	L=2.0 B=8	□03 - □08	1,540	340		250	950	용지	토지 89%
	함라	어등진입로	L=1.1 B=6.5	□03 - □07	1,124	129		200	795	용지	토지 82%
	웅포	매 곡 선	L=0.12 B=8	□02 - □05	581	433	98	50		공사		2차분 연 내 준 공
							명: 98
	낭산	맹동∼신정	L=1.4 B=8	□03 - □08	1,400	96	54	100	1,150	용지	토지 34%
							명: 54
	망성	어동∼사결	L=0.9 B=8	□03 - □07	1,280	164	116	160	840	용지	토지 76%
							사:116
	망성	신성∼관산토다리	=0.91 B=7	□03 - □07	1,050	250		80	720	용지	토지 69%
	망성	23번국도∼ 금지신덕	L=1.2 B=8	□04 - □08	1,440	40		200	1,200	용지	토지 조서 작성
	여산	신원태∼ 구원태	L=0.6 B=8	□03 - □07	826	108	22	50	646	용지	토지 60%
							명: 22
	여산	신리∼호월	L=2.0 B=8	□04 - □07	957	50		50	857	용지	감정평가 의뢰

구분	위치	사업명	사업 개요 (km, m)	사업기간	총 사 업 비					사업 구분	공정 (%)	비고
					계	기투자	2004 이월	2005	금 후 투 자
자 체 □ 계 속 □	여산	연명∼하양	L=0.7 B=8	□04 - □06	473			50	423	용지	토지 조서 작성
	여산	남원사진입로	L=0.2 B=8	□03 - □06	300	90		160	50	용지	토지 91%
	금마	공수부대∼ 미륵초교	L=2.2 B=8	□03 - □08	1,897	218	22	100	1,557	용지	토지 60%
							사: 22
	금마	누동∼신촌	L=0.93 B=8	□03 - □07	1,130	250	150	50	680	공사	공사 10%
							명:100 사: 50
	금마	갈산∼서편	L=1.6 B=8	□04 - □08	1,416	45	2	50	1,319	용지	토지 조서 작성
							명: 2
	왕궁	탑 포 선	L=2.2 B=8	□03 - □06	2,267	1,383		300	584	공사		4차분
	왕궁	평화촌∼ 평리	L=1.3 B=8	□04 - □08	2,500	30		100	2,370	용지	토지 조서 작성
	춘포	천서초교∼ 안수마을	L=0.8 B=8	□03 - □06	608	120	88	100	300	공사	토지 94%
							명: 88
	춘포	원오산 ∼ 인수	L=0.9 B=8	□03 - □06	839	539		100	200	공사	공사 40%
	춘포	시전∼신화	L=1.0 B=4∼6	□03 - □05	162	50		112		공사	공사 5%
	삼기	원촌마을	L=0.15 B=5	□04 - □05	120	18	32	50	20	공사	토지 69%
							명: 32
	삼기	검지마을 진입로	L=1.6 B=8	□03 - □07	1,070	79	141	210	640	공사	토지 79%
							명: 91 사: 50
	삼기	현동∼죽청	L=1.1 B=8	□03 - □07	850	130	100	200	420	공사	토지 71%
							명:100
	용동	신왕마을	L=0.4 B=8	□03 - □06	550	32	98	200	220	공사	공사 40%
							사: 98
	용동	삼정∼두무간	L=1.2 B=8	□03 - □08	1,421	65	35	100	1,221	용지	토지 5%
							사: 35
	송학	망기마을	L=0.5 B=8	□03 - □07	824	24		150	650	용지	토지 조서 작성
	팔봉	신촌선	L=1.3 B=8	□03 - □06	1,800	400	300	300	800	공사	공사 15%
							명:300
	삼성	하나로∼ 외화간	L=1.5 B=12	□03 - □08	2,520	245	55	100	2,120	용지	토지 15%
							명: 55

구분	위치	사업명	사 업 개 요 (km, m)	사업 기간	총 사 업 비					사업 구분	공정 (%)	비고
					계	기투자	2004 이월	2005	금 후 투 자
자 체 □ 이 월 □	소계	11개노선	L=8.9		9,210	1,638	1,732		5,840		34% 용역:50% 토지:38% 공사:13%
							명:1,209 사: 523
	용안	상신∼궁항간	L=0.72 B=6.5	□03 - □06	1,364	464	900			공사	공사 20%
							명:800 사:100
	황등	후생2마을	L=0.61 B=6	□04 - □05	121	71	50			공사	공사 5%
							명: 50
	함라	수동∼금곡간	L=1.2 B=8	□03 - □08	1,400	300	100		1,000	용지	토지 84%
							명:100
	함라	진등진입로	L=1.6 B=8	□04 - □07	800	40	60		700	용지	감정 평가 의뢰
							명: 60
	함라	칠성∼다은간	L=1.0 B=6.5	□03 - □07	750	31	159		560	용지	토지 60%
							사:159
	춘포	토다리∼ 덕동간	L=1.0 B=8	□04 - □08	1,369	27	33		1,309	용지	토지 조서 작성
							명: 33
	용동	고창∼화배간	L=2.77 B=8	□03 - □06	2,916	533	112		2,271	용지	토지 48%
							사:112
	함열	용성철도건널목 입체화실시설계	1식	□04 - □05	152	0	152			실시 설계 용역	용역 50%
							사: 152
		농어촌도로 기초자료용역	1 식	□05	30		30			용역
							명: 30
		군도.농어촌도로 도로망및지형도	1 식	□05	28		28			용역	완료
							명: 28
		미불용지	신장선외 20개노선	□05	280	172	108			용지
							명: 108
				이	하	빈	칸

보 조 사 업 내 역

□  11개노선  10.65km   ----------    3,335백만원

구분	위치	사업명	사 업 개 요 (km, m)	사업기간	총 사 업 비					사업 구분	공정 (%)	비고
					계	기투자	2004 이월	2005	금 후 투 자
합 계		11개노선	L=10.65		7,928	658	1,905	1,430	3,935		34%
							명:1,384 사: 521
계속	소계	1개노선	L=2.16		1,413	46	817	550			용역:50% 토지:13% 공사:39%
							명:817
	금마	다듬재 선형개량	L=1.2 B=11	□04 - □06	463	32	431			문화재보호구역으로위치변경(미륵산장앞)
							명:431
	삼기	미륵산장앞 선형개량	L=0.96 B=9	□04 - □06	950	14	386	550		용지	토지조서작성
							명:386
신규	소계	3개노선	L=2.17		912			662	250
	성당	성당∼외수	L=0.47 B=8	□05 - □07	400			150	250	실시 설계 용역	완료
		교통사고잦은곳개선사업	4개소	□05	186			186		공사	유관 기관 협의
		원팔봉 □ 공설 운동장외 1개소 중앙분리대	L=1.7 B=3	□05	342			342		실시 설계 용역
이월	소계	7개노선	L=6.32		5,603	612	1,088	218	3,685
							명:567 사:521
	영등	원대∼금마 중앙분리대	L=1.04 B=3	□04 - □05	300	16	284			공사	공사 30%
							명:284
	영등	오마트사거리 미끄럼방지	A=1,327□	□04 - □05	100		100			공사	완료
							명:100
	팔봉	신촌선	L=1.3 B=8	□03 - □06	1,800	83	17		1,700	공사	공사 15%
							명:17
	삼기	석불사거리 가로정비	L=1.66 B=2	□04 - □06	849	34	166	218	431	용지	토지조서작성
							명:166
	어양	어양선	L=0.32 B=8	□03 - □05	300	83	217			공사	공사 40%
							사:217
	함열	함열여고∼ 정자간	L=1.2 B=8	□03 - □07	1,200	225	75		900	용지	토지 74%
							사: 75
	황등	후정선	L=0.8 B=8	□04 - □05	1,054	171	229		654	공사	공사 50%
							사: 229

오 지 종 합  개 발 사 업

□ 사 업 개 요

□ 대    상 : 2개면 (여산, 웅포)

□ 사업개요

□여산면 - 원태∼관연 도로확·포장(L=0.3km, B=7m) : 393백만원

□웅포면 - 상제2마을 경로회관 신축 1동(웅포면) : 144백만원

- 구룡목 세천 정비(L=0.5km, B=6m) : 250백만원

□ 사 업 비 : 787백만원 (균특 551, 도비 118, 시비 118)

□ 상반기 추진실적

□ 여산면(원태~관연간 도로확·포장공사)

□실시설계 및 용역완료 : 2004. 12월.

□지방도(799호선) 포장에 따른 물량감소 등 설계서보완 작업 중

□ 용지매입 : 21필지 1,998□중 11필지 1,660□매입(83%)

□ 웅포면

□상제2마을 경로회관 신축 용역발주 설계완료 : 2005. 5월.

□구룡목 세천 정비 실시설계완료 : 2005. 6월

□ 하반기 추진계획

□ 여산면(원태~관연 도로확·포장공사)

□용지보상추진 : 2005. 6월 ~ 2005. 12월

□공사발주 및 착공 : 2005. 8월

□ 웅포면

□상제2마을 경로회관 신축

- 실시설계용역발주 : 2005. 6월 ~ 8월

- 공사발주 및 착공 : 2005. 9월

□구룡목 세천 정비

- 공사발주 및 착공 : 2005. 8월

주  민  숙  원  사  업

□ 사 업 개 요

□ 대  상 : 154개소    ---------------------------------------------    4,666백만원

□ 주 민  숙 원 사 업 : 148개소     -------------------------          3,891백만원

- 마을진입로포장 : 26건 L=9,170m, B=4∼6m    966백만원

- 마을안길포장 : 65건 L=12,507m, B=3∼5m  1,205백만원

- 노후도로덧씌우기 : 45건 L=49,705m, B=3∼8m   1,165백만원

- 기          타 :  12건(옹벽 및 보도브럭설치등)   555백만원

□ 도비보조사업: 6개소(함열,황등,금마,삼성,팔봉2)  -----   775백만원

□ 사 업 기 간  : 2005. 1 ∼12

□ 상반기 추진실적

□ 착  공 : 106개소(현공정 65%)    -------------------------   3,042백만원

□ 주민숙원사업 : 101개소(완공57, 공사중 33, 발주의뢰11) ----  2,287백만원

□ 도비보조사업 : 5개소(공사중4, 발주의뢰1)               ------    755백만원

□ 하반기 추진계획

□ 공사착공 : 48개소    -------------------------------------------    1,624백만원

□ 연내완공 : 41개소      -------------------------------       1,254백만원

□ 계속진행 :  7개소      ---------------------------------        370백만원

도 로 유 지  관 리 사 업

□ 사 업 개 요

□ 사 업 규 모 : 2개 분야 8개 사업 ,  947백만 원

□ 도로부속물 관리 - 2개 사업 ,  110백만 원

· 도로표지판 정비  · 도로부속물정비(3종)

□ 도로덧씌우기·정비 - 6개 사업 ,  837백만 원

· 노후도로 덧씌우기(600a)    · 읍면동 사리부설(9,500□)

· 읍면동도로붕괴보수(1식)  · 읍면시군도 유지관리(1,000m)

· 아스콘 소파보수(30a)       · 기안아파트 인도정비(3a)

□ 추 진 기 간 :  2005. 12월

□ 상반기 추진실적

□ 도로부속물 관리 : 2개 사업 ------------- 공정 60%

□ 완  공 : 도로부속물 정비(동중 앞 외 2개소 가드레일시설53경간)

□ 발주중 : 도로표지판 정비(금마 ~시청 3개로선)

□ 도로덧씌우기·정비 : 6개 사업  ---------------- 공정 65%

□ 완  공 : 읍면동 사리부설(6,000□) 아스콘 소파보수(56a)                      읍면시군도 유지관리 (군도15호선 55a)

□ 시공 중 : 노후도로 덧씌우기(남부시장, 대학로L=1.6km)

읍면동 도로붕괴보수(옹벽144m, 석축48m, 포장3a)

□ 발주 중 : 기안아파트 인도정비(3a), 노후도로 덧씌우기(200a)

□ 하반기 추진계획

□ 2005. 10월까지 마무리

□ 문제점 및 대책

□ I.C진입로등 주요간선노후도로 덧씌우기 60억 정도 소요

□ 연중 10억 예산확보 필요

□ 마을진입로 및 안길 법면붕괴 도로유지관리예산 확충필요

□ 연중 3억 예산확보 필요

도로장비 운영계획

□ 현     황

□ 총 보유 장비 ; 4종·11대

□ 굴삭기 2대, 덤프트럭 4대, 봉고트럭 2대, 가로등사다리차 3대

□ 교체 대상 장비(6년 이상 운행) ; 4종· 7대 - 522백만 원

□ 굴삭기 1대, 덤프트럭 3대, 봉고트럭 1대, 가로등사다리차2대

□ 2005 예산확보액 : 3종 3대 144백만원

□ 덤프트럭1대(15톤), 봉고트럭 1대(2.5톤), 가로등사다리차1대(3.5톤)

□ 구    입  : 2종 2대 102백만원

□ 덤프(15톤) 1대 76백만원, 봉고(2.5톤) 1대 26백만원

□ 미 구 입  : 1종 1대 42백만원

□ 3.5톤 가로등사다리차 1대(80백만 원) 구입예산 부족

□ 38백만원 제2회추경확보후 구입

□ 문제점 및 대책

□ 노후장비 교체예산 확보요망 : 3종 4대 340백만원

□ 굴삭기 1대 110백만 원, 8TON 덤프 2대 130백만원

5톤 가로등사다리차 1대 100백만원

가 로 등·보 안 등  유 지 관 리

□ 현       황

□ 시      설 :  22,264등     □□□□□□□   가로등 6,018, 보안등 16,246

□ 점소등 관리

□ 가로등 - 중앙통제원격관리

□ 보안등 - 자동점멸관리 8,173, 수동 3,651, 광전식 3,887, 소등 535

□ 사 업 개 요

□ 2005 정비계획  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□       406백만원

□ 보   안   등   신   설  -   220등              120  □

□ 가 로 등 정 비 외 2 종  -   45등 □□□□□□□□□□□□   97  □

□ 읍면동 보안등 위임수리  - 15,430등□□□□□□□□□□□□□ 189  □

□ 상반기 추진실적

□ 공정  --------------------------------------- 65%

□ 시 공 중 - 보안등 신설 29개 읍면동 215등

- 착공 5. 4   준공예정 7. 26(공정 70%)

□ 설 계 중 - 가로등 정비 45등외 2종

- 노후선로 확인  설계 중(6월 발주)

□ 연중 집행(읍면동 보안등 위임수리)

- 29개 읍면동 수리업체 단가계약 완료 및 자금배정완료

□ 도시계획도로 개설에 따른 가로등시설 협조추진(5개 노선 109등)

□ 하반기 추진계획

□ 보안등 신설 - 2005. 7월 완료

□ 가로등 정비 - 2005. 11월 완료

□ 문제점 및 대책

□ 가로등 정비사업비 연중 100백만원 필요 - 2005예산 40백만원

□ 보안등 위임수리비 부족액 40백만원 필요 - 2005예산 189백만원

□ 보안등 무선점멸기 사업비 연중 200백만원 필요 - 2005 예산삭감

삼기 마동교 재가설 검토

□ 현       황

□ 위  치 : 삼기면 기산리

□ 교량연장 : 14m

□ 교 량 폭 : 5.0m

□ 사 업 개 요

□ 사 업 량 : 재 가설 1개소

□기양천(지방하천2급)정비 기본계획수립 결과에 따라 시설규모       및 타당성검토 후 사업시행

□ 사 업 비 : 90백만원

□ 사업기간 : □05. 1 - □05. 12

□ 상반기 추진실적

□ 삼기 마동교 재 가설에 따른 시설규모등 기준이 되는 기양천      기본계획수립 용역 시행중(8월초 완료예정)

□ 하반기 추진계획

□ 마동교 재가설사업 □ 보수보강사업 으로 변경추진

□ 기본계획을 적용한 교량만 재가설시 주변여건과 연계성결여

□ 외관상 파손부분 보수·보강할 경우 이용 큰 지장 없을 것임

□ 재 가설사업은 기양천 정비 기본계획에 의거 하천정비시 반영

□ 보수보강공사

□ 조사·설계시행 : □05. 8 ∼ □05. 9월

□ 발주 및 착공 : □05. 9월

□ 사 업 기 간 : □05. 8 ∼ □05. 12월

호남선 철도 건널목 입체화 사업

□ 사 업 개 요

□ 건널목 개량대상 : 23개소

□ 시 행 완 료 : 2개소(용동, 망성)

□ 시  행  중  : 1개소(용성)

- 함열 용성 철도건널목(과선교) : 1개소 10,000백만원(익산시 시행)

□ 실시설계용역 시행중 -------------   180백만원

□ 금 후 시 행 : 2개소(망성 금지2+화산)

□ 시 행 불 가 : 16개소

□ 특기사항 : 황등건널목(동연+황방)은 익산시에서 1,750백만원(25%)

사업비 부담 시 한국철도시설공단에서 사업 시행

□ 상반기 추진실적

□ 용성 철도건널목 입체화 실시설계 용역 시행 : 2004. 11. 2 ∼ 2005. 6. 25

□주민 설명회 : 2005. 5. 20

- 계획노선(안)에 대한 토지 주 및 이해관계인 반대

□ 용역 중지(50%) : 2005. 5. 24

□ 하반기 추진계획

□ 용성 철도건널목 입체화 실시설계 용역 완료 : 2005. 8월

□ 협약서 체결 : 2005. 8. ∼ 9월

□개량사업비 확정시 철도청 부담 분 중 2005년 지원 가능(75%)액 협의

□ 토지 분할 및 감정 평가 : 2005. 9. ∼ 10월

□ 용지 매입 협의 : 2005. 11. ∼ 12월

중앙지하도 보수공사

□ 사 업 개 요

□ 위    치 : 익산시 중앙동~송학동(익산역 광장 지하)

□ 규    모 : L=514m, B=12.4m(1987준공)

□ 사업량

□ 시설물 균열 처리 - 865□ ,   누수오염 백태처리 - 4,696□

□ 시공이음부  처리 - 498□ ,   전 기, 배 수 처 리 - 1식

□ 환기구 방음벽 시설 개선 - 732□

□ 총 사업비 : 3,300백만원(시비) □ 보수·보강공사 1,700 , 시설개선 1,600

□ 2005 예산 : 500백만원

□ 사업기간 : 2005. 1월 ~ 2008. 12월(4개년)

□ 상반기 추진실적

□ 보수보강 부족사업비 추경 반영 추진(미확보)

□ 한국철도시설공단 보수지원협의(지원 지난)

□ 2005 예산 500백만원 보수 설계(우선 시행물량 조정 및 단가변경)

□ 하반기 추진계획

□ 발주의뢰 및 착공  : 6 ∼ 8월

□ 공사완료 :  연내 완공

불법 노상적치물·노점상 정비단속

□ 현       황

□ 정 비 대 상     □□□□□□□□□    7,000여건 예상(2004년도 6,500건)

□ 주요단속구역    □□□□□□□□□       24개 노선 28,35□

□ 불법우심지역 : 남북로외 9개소      □□□□□   22.95□

□ 교통혼잡지역 : 중앙시장외 4개소    □□□□□    1,73□

□ 주택취약지역 : 동신아파트외 8개소   □□□□    3,67□

□ 단속반 인력    □□□ 3개조 11명(담당자1, 수로원10) 소형트럭1

□ 상반기 추진실적

□ 노점상 ·포장마차 단속 ------------------- 3,625건(수거52건)

□ 노상 적치물 단속       ------------------- 2,533건(수거183건)

□ 하반기 추진계획

□ 중점단속 : 우심지역에 대한 교통불편 및 보행불편지역

□ 고정인원 1∼2명 배치

□ 민원지역 단속 : 기동반 2명편성 순회단속

□ 일제단속 : 노점집단형성지역 총동원 단속

□ 문 제 점

□ 노점단속인원 절대부족

□ 생계형 노점 계속증가 및 노점상 저항 단속근절 한계

□ 대    책

□ 별도의 도로 단속반 직제 편성 - 2개반 신규충원 필요(차량2대,

단속요원 12명)

옥외 불법광고물 정비

□ 현       황

□ 정비대상 : 불법 옥외광고물(입간판, 현수막, 벽보지류)

□ 정비반편성: 건설과 기동정비반5명, 면 15개반

□ 지정게시시설 현황

□ 현수막 게시대: 99개소 164면

- 일  반  용 : 81개소 146면

- 행정홍보용 : 18개소  18면

□ 지정벽보 게시대: 63개소 99면

□ 상반기 추진실적

□ 불법광고물 정비 : 72,544건(현수막 2,827, 벽보 65,040, 기타 4,677)

〈 야간 및 공휴일 특별단속 :  15회 4,560건〉

□ 불법광고물 행정처분 : 계고장 발부 - 156건 과태료부과 - 2건 875천원

□ 행정홍보용 현수막 게시대 신설 :18개소 18면

□ 불법광고물 시민감시단 구성 :14개단 399명

□ 하반기 추진계획

□ 불법광고물의 지속적인 정비 및 행정 처분강화

□특별단속(야간 및 공휴일) 강화 - 주1회 이상

□상습, 고질적 광고주와 광고업체 과태료부과 및 행정처분

□ 현수막 게시대 교체 : 16개소 30면

□ 지정벽보게시대 증설 :23개소 46면

소하천 정비사업

□ 사 업 개 요

□ 소하천 정비 : 14개소 4,870m  □□□ 1,762백만원

□ 농특세사업 :  2개소  580m   □□   669백만원(농 50 ,시 50%)

□ 도 비 사 업 :  1개소 1,200m  □□   120백만원(도비 100%)

□ 자 체 사 업 : 11개소 3,090m  □□   973백만원

□ 상반기 추진실적 --------------------- 공정 71%

□ 공사시공 :  3개소 착공 (도평천, 신서원천, 도천천)

□ 공사준공 : 5개소 (장중~송선, 춘포판문, 용안법성, 상신, 목천배수장)

□ 토지매입 및 설계 중 :□ 2개소 28필지 중 10필지 매입(36%)

□ 설계 중 : 4개소

□ 하반기 추진계획

□ 현장조사 및 실시설계(4개소)  □□□□□□  2005. 5월 ∼ 6월

□ 공    사    착    공(4개소)  □□□□□□  2005. 6월 ∼ 7월

□ 준                공(9개소)□□□□□□□  2005. 12월말

□ 토지매입 : 4개소 18필지 6871□(2,100평)

소하천 정비사업 내역

( 단위 : 백만원 )

사 업 명			위치	사업개요	사업비	비고
총 14 개소				L=4,870m	1,762	71%
국 가 사 업	3 개소			L=1,780m	789
	농특세	갈전천 정비공사	팔봉	L= 400m	469	입찰중 감정평가완료
		내산동천정비공사	낭산	L= 180m	200	입찰중 감정평가완료
	도비	장중-송선간도로 포장공사	왕궁	L= 1,200m	120	완료 5.20
자체사업	11 개소			L= 3,090m	973
	춘포판문배수처리시설공사		춘포	1식	28	완료 5.20
	용안법성마을소하천정비		용안	L= 390m	40	완료4.19
	용안상신마을소하천정비		용안	L= 210m	30	완료 3.30
	도평소하천 정비공사		왕궁	L= 380m	423	공사중50% 용지매입60%
	금마신서원천 정비공사		금마	L= 100m	50	공사중5%
	금마도천천 정비공사		금마	L= 60m	50	공사중30% 용지매입52%
	목천배수장 휀스설치		목천	1식	14	완료 4.11
	신북리외1개소 준설공사		목천	준설12,000□ L=1,310m	52	입찰중 (추경분)
	장전소하천 정비공사		성당	L= 340m	205	설계중 (추경분)
	탑 천 정 비 공 사		금마	L= 100m	20	설계중 (추경분)
	금마상제마을소하천정비		금미	L= 200m	61	설계중 (추경분)

산북천 수해상습지 개선사업

□ 사 업 개 요

□ 위    치 : 익산시 낭산면 일원

□ 하 천 명 : 산북천, 죽정천(지방2급하천)

□ 사업개요 : 하천정비 6.7km

- 축제 및 호안정비 L=9.5km

- 교량 6개소, 배수구조물 28개소

□ 사 업 비 : 9,360백만원(국비 60%, 도비 20%, 시비 20%)

□ □03년  1,667백만원,  □04년  4,442백만원 ,  □05년  3,251백만원

□ 사업기간: 2003. 1. ∼ 2006. 12

□ 상반기 추진실적 □ (1차분 91%)

□ 축제 및 호안정비 9.5km 중 5.6km 완료

□ 배수구조물 28개소 중 27개소 완료

□ 교량 6개소 완료

□ 토지보상 122필지 26,759□ (매입 33필지 5,638□ 토지사용승락

57필지 13,320□) -------- 72%

□ 하반기 추진계획

□ 1 차분

□ 위    치 : 익산시 낭산면 삼담리 -성남리(죽청천)

□ 사업기간 : 2004. 5.13 ~ 2005. 9. 24

□ 사 업 비 : 4,999백만원(도급액 3,834    관급액1,165)

□ 금후계획 : 축제 및 호안정비 1.2km,  배수구조물1개소

□ 2 차분 --- 6월 발주계약 예정

□ 위    치 : 익산시 낭산면 낭산리 - 호암리(산북천)

□ 사업기간 : 2005. 5월 ~ 2006. 12월

□ 사 업 비 : 2,369백만원(도급액1,849  관급액520)

□ 사업개요 : 축제 및 호안정비 2.7km

하천 기본계획 수립

□ 하 천 현 황

□ 국 가 하 천( 3개소)   33.5km    □   기본계획수립 완료

□ 지방1급하천( 3개소)    6.5km    □   기본계획수립 완료

□ 지방2급하천(26개소)  150.2km    □   99.2km 수립(66%)

(미수립 16개소 51km , 미개수 17개소 76km )

□ 소  하  천(58개소) 98.178km    □   기본계획수립 완료

□ 사 업 개 요

□ 기양천 기본계획 용역 L=9.8km 용역비 178백만원 (사고이월비)

□ 탑천, 망등천 기본계획 용역 L=26km 용역비 327백만원

□ 상 반 기 추 진 실 적

▣ 기양천기본계획수립 용역중

□ 위    치 : 익산시 황등면 , 삼기면 , 금마면 일원

□ 개    요 : L =  9.8Km , 용역비 178백만원

□ 용역기간 : 2004. 9. 14 - 2005. 6. 13(05. 5. 21 용역중지)

□ 추진사항 : 공정 94%

□ 환경성검토 승인요청  -----전주지방환경청

□ 기본계획 심의 준비중

□ 하 반 기 추 진 계 획

□ 기양천 기본계획 완료후 익산지방국토관리청에 공사시행의뢰 □   □05. 9월중

□ 탑천 추진계획

□ 위    치 : 익산시 황등면, 삼성동, 팔봉동, 금마면 일원

□ 개    요 : L=26km ,

□ 용역비 : 327백만원(도비127  시비200)

□ 발주의뢰 예정 : 2005. 6월 중

□ 용역시행 : 2005. 7월 ~ 06. 8월

재난관리대상시설 안전점검

□ 사 업 개 요

□ 총 관리대상 시설  : 578개소

□ 중점관리대상시설 : 575개소(A급182  B급362  C급 31)

□ 재난위험시설 D, E급 : 3개소(D급 익산시청, 모현우남아파트, E급 마동교)

□ 상반기 추진실적

□ 재난예방 안전점검 실시 ---------------  261개소

□ 설날대비 다중이용건축물 안전전검   ------------------     46개소

□ 해빙기 취약시설 점검     ----------------------------    119개소

□ 집회시설 안전점검     ------------------------------       16개소

□ 신종업종 안전점검             ------------------------      41개소

□ 종교시설 안전점검            ------------------------       39개소

□ 하반기 추진계획

□ 재난예방 안전점검 계획   -------------  753개소

□ 휴가철 다중이용시설 안전점검     ---------------------       3개소

□ 추석절 다중이용시설 안전점검     ---------------------       22개소

□ 신종업종 및 종교시설 다중이용시설 안전점검  ----------     80개소

□ 동절기 재난취약시설 다중이용시설 안전점검  ----------    24개소

□ 연말연시 다중이용시설 안전점검  -------------------     46개소

□ 중점관리대상 시설물일제(전수)조사 재평가   --------------   578개소

□ 재난위험시설물 안전점검(D,E급)        ------------------     매  월

□ 대통령, 장관, 지사등 지시사항 및 유사사고예방, 특별점검  ---      수 시

기초생활보장수급세대 가스시설개선사업

□ 사 업 개 요

□ 사 업 량 : 배관 교체 및 가스차단기 설치 153세대 개선

□ 사 업 비 : 35,190천원(도비 17,595, 시비 17,595)

□ 사업기간 : 2005. 2월 ∼ 10월

□ 개선방식

□ 가스배관을 강관으로 교체 및 휴즈콕크 등 안전장치 설치

□ 가스 자동 차단장치 설치

□ 상반기 추진실적

□ 읍면동 대상자 선정 및 기초조사    -------------   153세대

□ 실시설계 및 발주의뢰    -----------------------  2005.  6

□ 하반기 추진계획

□ 공    사    착    공    -----------------------  2005.   7

□ 공    사    준    공   ------------------------  2005.  10

□ 기 대 효 과

□ 기초 생활보장대상 가정의 노후 가스시설을 개량하여 근본적 재난사고 예방

□ 기초생활보장대상 가정의 지원으로 삶의 의욕증진 및 시민화합

□ 주문배달로 사용 중단 및 잔여 가스 발생으로 인한 경제적 손실방지

□ 작은 실수로 인한 가스사고 예방

住    宅    課

□ 一   般   現   況

□ 2005 豫算執行實績

□ 2005 上半期 成果 및 反省

□ 2005 主要業務推進狀況

一   般   現   況

													주 택 과
주택행정담당									주택관리담당								건축물관리담당									건축민원담당							건축지원담당
□ 과소관행정의종합기획조정 □ 국민주택융자금관리 □ 무 허 가 건 축 물 지 도 단 속 및 시 정 조 치 □ 주 택 과 태 료 징 수									□ 도시주거환경개선사업 □ 시영임대아파트관리 □ 주택건설사업계획승인 □ 임 대 주 택 관 리 □ 공 동 주 택 관 리								□ 건 축 물 관 리 대 장 신 규 ·도 면 작 성 □ 건축물대장기재신청 □ 건축물표시(변경·정정) □ 건축물관리대장발급 □ 건축물말소및부존재확인									□ 건 축 허 가 □ 건 축 물 사 용 승 인 □ 건 축 물 용 도 변 경 □ 건 축 통 계 작 성 □ 건축물부설주차장관리							□ 건 축 신 고 □ 농촌주거환경개선사업 □ 건축행정건실화 □ 재 건 축 사 업 추 진 □ 건 축 물 안 전 점 검 □ 건 축 협 의

(정원/현원)

구 분	계	5 급	6 급	7 급	8 급	9 급	기능
정 원	33	1	5	10	10	3	4
현 원	35	1	5	7	12	6	4
과부족	2	-	-	□3	2	3	-

□ 총  가 구 수  :  110,585 가구

□ 총 주 택 수  :  105,083                   주택 보급률 : 95.02%

□단독주택 :  44,824                                 42.65

□공동주택 :  58,954                                 56.10%

□다세대주택 :    1,305                                   1.25%

□ 전북 96.0%, 전주 89.8%, 군산 91.8%, 정읍 98.1%, 김제 99.5%, 남원 101.6%

□ 건축사사무소 : 28개소

□ 주택건설업체 : 10개소

□제일, 제일종합, 하림, 세화, 대신, 캐슬, 삼성주택, 케이씨, 우남건설, 대한토건

(단위 : 단지/세대)

구 분	총 계	분 양			임 대
		소 계	자치관리	위탁관리	소 계	자체관리	위탁관리
단지수	94	70	28	42	24	10	14
세대수	49,984	34,607	14,303	20,304	15,377	7,411	7,966

□ 의무관리대상 공동주택 범위

□ 300세대 이상 공동주택

□ 세대수가 150세대 이상으로서 승강기가 설치된 공동주택

□ 세대수가 150세대 이상으로서 중앙집중 난방식 공동주택

□ 건축허가 및 건축신고 사용승인 현황

(단위 : 건)

구 분	계	건축 허가	건축 신고	용도 변경	사용 승인	사업 승인	비고
합 계	313	82	90	6	134	1
허가 및 사용승인	158	82		6	69	1
신고 및 사용승인	155		90		65

□ 건축물대장관리 민원처리 현황

(단위 : 건)

구분 계	기재신청	기재사항 변경·정정	부존재 증명원	말 소	소유권정리 및 전환·합병	비고
5,242	201	138	16	140	4,747

□ 건축허가 처리 실적

년 도	건 수	연면적(□)	비 고
1997	443	713,985
1998	206	140,486
1999	523	323,709
2000	852	681,361
2001	716	681,889
2002	1,020	664,443
2003	770	591,184
2004	559	377,458
2005.5	172	168,146

2005 豫算執行實績

【2005. 5. 31현재】                                           (단위 : 천원)

세항	세세항	목	예 산 액	집 행 액	잔 액	비 율 (%)	비고
총 계			5,512,293	1,962,343	3,549,950	35.6
소 계(일반회계)			4,579,027	1,713,653	2,865,374	37.4
건 축 지 도	경 상 예 산	수 당	115,103	34,827	80,276	30.3
		일반운영비	24,340	10,152	14,188	41.7
		국내여비	44,600	18,550	26,050	41.6
		시책추진 업무추진비	800	168	632	21.0
		기타업무 추 진 비	3,780	894	2,886	23.6
	사업예산 (보조)	시 설 비	2,428,864	807,471	1,621,393	33.2
		시설부대비	1,260	1,260	0	100
		민간자본이전	62,000	16,000	46,000	25.8
		자치단체등 자본이전	1,130,670	528,670	602,000	46.8
	사업예산 (자체)	재 료 비	29,600	27,159	2,441	91.8
		연구개발비	33,660	0	33,660	0
		시 설 비	701,000	265,502	435,498	37.9
		자 산 및 물품취득비	3,350	3,000	350	89.6
소 계(특별회계)			933,266	248,690	684,576	26.6
주 택 사 업	경상예산	일반운영비	28,155	1,887	26,268	6.7
		국내여비	2,000	790	1,210	39.5
	사업예산	시 설 비	48,000	0	48,000	0
지방채상 환	채무상환	차입금이자	85,734	52,929	32,805	61.7
		차입금원금	505,568	193,084	312,484	38.2
제 지 출 금	예비비등	반환금및기타	66,200	0	66,200	0
예비비	예비비등	예 비 비	197,609	0	197,609	0

2005 상반기 성과 및 반성

□ 성    과

□ 위법건축물 단속강화로 건축질서 확립

□상 설 점 검 반 편 성 운 영: 3개반  7명

□건축사 간담회 및 직무관련교육(29명) : 2005. 1. 16.

□건축담당 직무교육 및 다짐대회(47명) : 2005. 3. 18.

□ 건축설계 민원실 운영으로 봉사하는 건축행정상 정립 : 157건

□건축신고용 설계도서 무료작성 :  31건

□건축물 현황도면 작성 및 민원상담  : 126건

□ 농촌 주택건설 기술지원팀 운영으로 주민편익 도모

□농어촌 주택 기술지원반 편성 : 3개반 9명

□농가주택 계획상담 및 지도 : 21읍면동 20명

□시공중인 농가주택 순회 기술지원 및 지도  :  21읍면동 1회

□ 건축물관리대장 정보화작업 추진

□건축물대장 현황도면 전산화 작업 : 78,300면

□ 반    성

□ 불법건축물 사전예방 홍보 및 고질·상습위반자 과태료

(이행강제금) 징수실적 미흡

2005 主要業務推進狀況

	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	2005 주택행정분야 주요사업 추진상황 옴솟골지구 도시주거환경개선사업 역골지구 도시주거환경 개선사업 2단계 도시주거환경 개선사업 국 민 주 택 융 자 금 회 수 영 구 임 대 주 택 주 거 환 경 개 선 사 업 농 촌 주 거 환 경 개 선 사 업 건축행정정보시스템현황도면전산화작업 공동주택주변도시미관조성 건 축 물 부 설 주 차 장 관 리 불 법 건 축 물 지 도 단 속 건 축 행 정 건 실 화 추 진 건 축 물 안 전 점 검 국민주택등기서류무료대서 모 현 아 파 트 재 건 축 추 진

2005 주택행정분야 주요사업 추진상황

	총 8개사업 6,027백만원
□ 2005년 사 업 □□□□□□□□ 8개사업 6,027백만원 □보 조 사 업 □□□□□□□□ 3개사업 2,203백만원 □자 체 사 업 □□□□□□□□ 4개사업 764백만원 □기 타 사 업 □□□□□□□□ 1개사업 3,060백만원

□ 주요 사업내용

□ 농촌주거환경개선사업                     2개사업  3,092백만원

□ 농촌주택개량사업                        : 138동 3,060백만원

□ 농촌빈집정비사업                        :  80동   32백만원

□ 1단계 도시주거환경개선사업                2개지구 2,143백만원

□ 송학동 역골지구                      :     1,041백만원

(이월 : 393백만원, 보조 : 648백만원)

□ 동산동 옴솟골지구                        :       602백만원

□ 송학동 역골지구(익산역 철도 완충녹지 보상)  :  500백만원

□ 영구임대아파트 주거환경개선사업               2개소   528백만원

□ 동산주공아파트(4동 15층 686세대)        :        85백만원

□ 부송주공아파트(7동 15층 1,612세대)       :        443백만원

□ 2단계 도시주거환경개선사업                3개지구  201백만원

(평화, 창인·평화, 마동지구 정비계획수립 및 정비구역지정 용역)

□ 공동주택도시미관조성사업                 1개사업    29백만원

□ 건축물대장 현황도면 전산화사업           1개사업    34백만원

□ 추 진 실 적

□ 총 사 업                             8개사업  6,027백만원

□ 완    료                             1개사업     29백만원

□ 공동주택도시미관조성사업 (넝쿨장미 식재)

□ 추 진 중                             7개사업  5,998백만원

□ 주택개량사업 : 138동(완공 12, 공사중 71, 미착공 14, 잔여분 41동)

□ 빈집정비사업 :  80동(철거 40, 철거중 12, 미철거 28)

□ 도시저소득주민 주거환경개선사업(옴솟골, 역골지구)

□ 송학동 역골지구(익산역 철도 완충녹지 보상)

□ 영구임대아파트 주거환경개선사업(동산주공, 부송주공)

□ 2단계 도시주거환경개선사업(3개지구)

□ 건축물대장 현황도면 전산화사업

옴솟골지구 도시주거환경개선사업

□ 사업개요

□ 지구면적 : 45,510□ (13,767평), 공동주택개량방식

□ 사업현황 : 도로개설 0.5□, 국민주택규모아파트건설 800세대

□ 사 업 비 : 2,322백만원 (국비 50%, 도비 10%, 시비 40%)

□`02년 : 438백만원, `03년 : 586백만원, `04년 : 696백만원, `05년 : 602백만원

□ 사업기간 : 2002. 2 ∼ 2008. 12

□ 2004년까지 추진실적 : 지구지정고시, 주공협약체결, 사업계획승인

□ 2005년 추진계획 : 토지 및 지장물 보상(70%)

□토지 및 지장물(7,131백만원), 이주보상(825백만원)

□ 사업시행자 : 대한주택공사 전북지역본부 위탁 시행

□ 상반기 추진실적

□ 지장물 조사 및 열람                2005. 2월 ∼ 3월

□ 보상계획 공고                      2005. 3. 30 ∼ 4. 13.

□ 감정평가 실시                      2005. 5. 30 ∼ 6. 30.

□ 하반기 추진계획

□ 토지 및 지장물 보상            2005. 7월 ∼ 2006.  3월

□70% 보상완료 : 7,956백만원

□ 사업 착공 및 준공                2006. 4월 ∼ 2008. 12월

역골지구 도시주거환경개선사업

□ 사업개요

□ 지구면적 : 33,784□ (10,220평)

□ 사업현황 : 도로개설 1.2□, 주차장 3개소, 놀이터 2개소, 경로당 1동

□ 사 업 비 : 2,554백만원 (국비 50%, 도비 10%, 시비 40%)

□`02년 : 438백만원, `03년 : 690백만원, `04년 : 778백만원, `05년 : 648백만원

□ 사업기간 : 2002. 2 ∼ 2005. 12

□ 2004년까지 추진실적 : 공사착공(`04.12.28), 보상(40필지 1,428백만원)

□ 2005년 추진계획

□보상(10필지 460백만원) : 토지 및 지장물 보상완료

□공사(549백만원) : 도로개설 L=673M, 폐기물처리 1식 완료

□ 상반기 추진실적

□ 보 상

□토지보상(94.3%) : 10필지 434백만원

□토지 등 수용재결신청(건축물 1개소/26백만원) : 2005. 4.19.

□ 공 사 (60%) : 320백만원

□공사내용 : 토공, 우수공, 오수공 완료

□ 하반기 추진계획

□ 토지 및 지장물 보상 완료

□미 협의 토지 : 8월중 재결결과에 따라 토지수용

□ 상수도, 측구, 포장공사 완료           2005.  6월 ∼ 12월

□ 공사 준공                            2005. 12월

2단계 도시주거환경개선사업

□ 사업개요

지 구 명	평화지구(공동주택)	창인·평화지구(공동주택)
위 치	평화동 이일여고 서편	익산역 관사부근
면 적	58,872□(17,808평)	33,898□(10,254평)
거주가구	169가구 426인	308가구 614인
사 업 비	4,591백만원	4,591백만원
사업개요	국민주택규모아파트: 700여세대	국민주택규모아파트: 500여세대
지 구 명	마동지구(현지개량)	항가매(공동주택) -예비지구
위 치	마동사무소 뒷편	모현동 산업도로옆
면 적	27,718□(8,384평)	58,958□(17,834평)
거주가구	165가구 463인	169가구 330인
사 업 비	4,173백만원	4,591백만원
사업개요	도로개설1.0km 및 주차장시설등	국민주택규모아파트: 800여세대

□ 2004년까지 추진실적 : 건교부 지구확정, 연차별 사업비 확정

□ 2005년도 추진계획 : 정비구역지정 완료(201백만원)

□ 상반기 추진실적

□ 정비계획수립 및 정비구역지정 용역 : 2005.2.21∼2006.1.6.

□ 전북도 투융자 심사(적정)            : 2005. 5. 3.

□ 하반기 추진계획

□ 정비계획수립 및 주민설명회 : 2005.  7월 ∼ 8월

□ 관련부서 협의               : 2005.  9월

□ 주민공람 및 의회 의견청취   : 2005. 10월

□ 정비구역 지정 신청(건교부)   : 2005. 11월

국민주택 융자금 회수

□ 상환현황

□ 총 융자금 :  3,517세대  12,686백만원

□기상환 :  3,126세대  10,879백만원 (85.8%)

□미상환 :    391세대    1,807백만원 (14.2%)

□ 융자기간 : 1년거치 19년상환(1966년∼1989년까지 대출)

□ 융자이율 : 일반주택 5.0%, 수해주택 3.0%, 연체 10%

□ 2005년도 징수계획 : 556백만원

□ 상반기 추진실적

□ 회수실적 : 213백만원(38.3%)

□ 4회이상 체납자 납부권유문 및 독촉장발부 : 2회 275세대

□ 상환기간 종료 연체자 납부독려 및 실태조사 : 117건 (1,610백만원)

□납부불가능 세대 및 사유파악

□매각대상 물건파악 및 유형별 조사

□ 고액체납자(2백만원 이상) 전국재산조회 : 82명

□ 시장명의 국민주택 매각 : 5건 82,800천원

□ 체납자 금융자산 조회 의뢰 : 105개소(관내 금융기관)

□ 하반기 추진계획

□ 체납자 전국재산조회 및 채권확보 : 2005. 7월

□ 고액체납자 체납처분

□근저당설정 물건 경매 처분 : 2005. 8월

□익산시장 명의 국민주택 명도소송 실시 : 2005. 9월

□ 합동징수반 및 야간징수반 운영 : 2005. 10월

□ 문제점 및 대책

□ 징수불능액 1,052백만원에 대한 연 10%(105백만원) 연체이자

계속 발생 체납액 누적

- 2006년 일반회계 예산확보 충당 : 1,000백만원

영구임대주택 주거환경개선사업

□ 사업개요

□ 대상단지 : 2개소(10년이상 경과된 공공임대주택단지)

□동산주공아파트 (1992년 준공)

□ 4동 15층 686세대, 7평·9평(기초생활수급자 : 366세대)

□부송주공1단지아파트 (1993년 준공)

□ 7동 15층 1,612세대, 7평·9평(기초생활수급자 : 1,612세대)

□ 지원대상 : 단지내 기반시설, 복리시설, 부대시설 등의 신설 및 개·보수

□ 예산지원 : 528,670천원(국비 50%, 시비 50%)

□ 대상사업

단 지 명	사 업 개 요	예 산 (천원)
		계	국비	지방비(시비)
2개단지		528,670	264,335	264,335
동산주공APT	어린이놀이터, 담장 재활용품 보관시설	85,670	42,835	42,835
부송주공 1단지APT	장애인이동통로, 담장 조경시설, 어린이놀이터 재활용품 보관시설	443,000	221,500	221,500

□ 사업기간 : 2005. 2 ∼ 2005. 12.

□ 사업시행자 : 대한주택공사 전북지역본부 위탁 시행

□ 상반기 추진실적

□ 공기관 대행사업 추진 협약체결(위탁)       : 2005. 2. 11.

(익산시□대한주택공사 전북지역본부)

□ 주거환경개선 대행사업비 지급 완료         : 2005. 4. 20.

□ 공사 착공                                 : 2005. 5. 12.

□ 하반기 추진계획

□ 주거환경개선사업 준공                     : 2005. 10

□ 사업완료 및 정산실시                      : 2005. 11

농촌주거환경개선사업

□ 사업개요                                       (단위 : 동/백만원)

구분 사업별	사 업 량	사 업 비	비 고
계	218	3,092
주택개량	108	2,160	□동당 20백만원 융자(2004년분)
	30	900	□동당 30백만원 융자(2005년분)
빈집정비	80	32	□동당 0.4백만원 보조

□ 상반기 추진실적

□ 주택개량사업 추진실적

□대상자 조사 : 2005. 1 ∼ 2005. 2월

□대상자 선정 : 2005.  3. 20.

- 2005년도분 :  30동(대상자선정 30동)

- 2004년도분 : 108동(대상자선정 67동, 잔여물량 41동)

□추       진 : 97동 (완공 12, 공사중 71, 미착공 14)

□ 빈집정비사업 추진실적

□대상자 조사 : 2005. 1 ∼ 2005. 2월

□대상자 선정 : 2005.  2. 22.

□추       진 : 80동 (철거 40, 철거중 12, 미철거 28)

- 보조금 지급 : 16백만원(40동□400천원)

□ 하반기 추진계획

□ 주택개량사업

□미착수 사업자에 대하여 조기착공 독려

□2004년도 미배정 잔여분(41동)에 대하여는 추가배정 또는 반납조치

□ 빈집정비사업 : 2005년내 정비 마무리

건축행정정보시스템 현황도면 전산화작업

□ 사업개요

□ 대    상 : 현황도면 전산화 65,600면

□ 사 업 비 : 33,660천원(예산액)

□ 용역금액 : 30,176천원(□3,484천원)

□ 사업기간 : 2005. 2. 1 ∼ 8. 2(6월중 완료예정)

□ 사 업 자 : (주)에크미컴퓨터 대표 공민식

□ 상반기 추진실적

□ 계획서 보고 및 용역의뢰 : 2005. 1월

□ 용역계약 및 착수계 제출 : 2005. 2. 1.

□ 현황도면 전산화 입력작업 완료 : 2005. 2 ∼ 5. 15.

□ 완료면수 : 78,300면(용역대비 12,700면 증 : 19%)

□ 하반기 추진계획

□ 현황도 통합구축 시범운영 : 2005. 5. 15 ∼ 6. 15.

□ 현황도면 전산발급 개시 : 2005. 6. 20일경

□ 기대효과

□ 건축물대장 현황도면 전산발급 요청시 민원창구에서 즉시

발급 가능함으로써 빠른 대민서비스 제공

공동주택주변 도시미관조성

□ 목    적

□ 아파트 담장을 투시형 담장과 수벽 설치로 녹지공간 조성 유도

□ 꽃나무(덩굴장미 등) 식재로 아름다운 도시미관 창출 및 쾌적한

주거환경 조성

□ 사업개요

□ 식재대상 : 관내 공동주택단지

□ 식재주관 : 각 아파트 관리주체

□ 관리사무소, 입주자대표회, 부녀회 등

□ 식재내용 : 투시형 담장, 도로변 위주로 덩굴장미 식재

□ 사 업 비 : 29,600천원

□ 상반기 추진실적

□ 제1차 사업추진 : 2005. 3. 30.

□ 사 업 비 : 19,959천원

□ 사업내용 : 덩굴장미 4,000주(68단지), 철쭉 4,660주(77단지)

□ 제2차 사업추진 : 2005. 4. 11.

□ 사 업 비 : 7,200천원

□ 사업내용 : 철쭉 9,000주(87단지)

□ 사업완료 : 2005. 4. 11.

□ 하반기 추진계획

□ 꽃나무 식재에 따른 유지관리 철저 안내(아파트 관리사무소)

건축물 부설주차장 관리

□ 현    황

□ 총  2,927개소  :  49,507대

□ 옥  외 2,495개소  31,213대  □ 복  합 215개소 16,887대

□ 옥  내   201개소    1,269대  □ 기계식  16개소        138대

□ 상반기 추진실적

□ 일제점검 : 2회 (3월, 5월)

□ 175개소 8,801대

□ 불법행위 : 18개소 (714대)

□ 물 건 적 치 : 7개소 (53대)

□ 불 법 증 축 : 3개소 (18대)

□ 기계식주차장 정기점검 미실시 : 2개소 (16대)

□ 방범설비(CCTV) 미설치 및 부적합 : 6개소 (627대)

□ 조치내용

□ 원   상    회   복 : 9개소 (160대)

□ 원상회복명령(계고)  : 9개소 (554대)

- 불법증축 : 2개소 (14대)

- 방범설비 부적합 : 5개소 (524대)

□ 기계식 주차장 정기점검 미실시 : 2개소 16대(기고발)

□ 하반기 추진계획

□ 분기별 정기점검 추진 : 2회(3/4, 4/4분기)

□ 택지개발지역 등 취약지역 집중점검 : 수시

불법건축물 지도단속

□ 현    황

□ 중점단속대상

□ 29개읍면동 주요도로변, 주택가, 아파트주변등

□ 무단신축, 증개축등 불법건축물

□ 콘테이너박스 및 포장마차

□ 공동주택, 복합상가, 집단무허가 취약지역

□ 추진요령

□ 상설점검반 및 단속반 편성 운영

□ 위법건축물 고발후 과태료(이행강제금)부과

□ 상반기 추진실적

□ 상설점검반 및 단속반 편성운영 : 3개반 7명

□ 정   기   순   찰 : 매주 2회이상

□ 특별기획단속 실시 : 매월 1회

□ 불법건축물 및 가설건축물 단속결과 조치사항

적발건수	조 치 사 항				비 고
	철 거	추 인	이행강제금	진 행 중
37	11	3	13	10	고발 7건

□ 하반기 추진계획

□ 상설점검반 및 단속반 지속운영

□ 특별기획단속 지속추진 : 6 ∼ 12월(7회)

□ 불법행위 건축물 단전·단수 조치 및 이행강제금 지속부과

건축행정 건실화 추진

□ 현   황

□ 건축행정 개선 및 불법행위 근절

□건축허가 및 사용승인된 건축물의 사후점검

□ 건축행정 신뢰도 제고 및 민원처리 투명화

□건축법개정 및  완화에따른 조례개정

□건축행정 처리과정 인터넷 공개

□건축직공무원 직무 및 연찬 교육실시

□ 공동주택, 집단무허가 취약지역에 대한 위반건축물 중점점검 실시

□ 지속적인 홍보 및 지도점검으로 불법행위 사전예방 및 단속

□ 상반기 추진실적

□ 건 축 민 원   안 내 책 자  발 간 (800부) : 2005. 1.  8.

□ 건 축 사  간 담 회   및   직 무 관 련  교 육 (29명) : 2005. 1. 16.

□ 건 축 담 당  직 무 교 육   및  다 짐 대 회 (47명) : 2005. 3. 18.

□ 공동주택 안전점검 및 위반건축물 지도단속 : 2005. 5. 16 ∼ 5. 30.

□ 당해년도 건축사업무대행 및 시공중인 건축물 점검(69건) : 2005. 5. 16 ∼ 6. 4.

□ 하반기 추진계획

□ 하 반 기 건 축 사 업 무 대 행 건 축 물 점 검 : 2005. 11월

□ 건축신고서 작성 및 건축물현황도면 무료작성 : 년 중

□ 공동주택 안전점검 및 위반건축물 단속 : 2005. 12월

건 축 물  안 전 점 검

□ 점검개요

□ 점검기간 : 2005. 1월 ∼ 12월

□ 점검횟수 : 년 4회(분기별)

□ 점검대상 : 346개소

□ 중점관리대상 아파트  (사용승인 후 15년경과) : 17개소

□ 중점관리대상 연립주택(사용승인 후 15년경과) : 82개소

□ 의무적 관리대상 공동주택                   : 87개소

□ 다중이용시설물(시특법대상 시설물)           :  8개소

□ 축대(높이 5m, 연장 20m이상)                :  2개소

□ 다중이용건축물(300□이상 예식장, 1,000□이상 숙박시설) : 38개소

□ 소방서 협조 안전점검(대형화재취약)          : 41개소

□ 윤락용의업소 안전점검(익산경찰서 주관)      : 71개소

□ 점검사항 : 대지안정여부, 건축물 구조적 안전상태, 지반침하

여부, 건축법 위반사항 등

□ 상반기 추진실적                           2회 189개소

□ 해빙기대비시설물자체안전점검(179개소) : 2005. 3. 3 ∼ 3. 18.

□ 적발 15개소 (현지시정 11, 시정명령 후 조치완료 4)

□ 대형화재 취약대상 합동점검 (10개소) : 2005. 3. 8 ∼ 3. 10.

□ 적발  3개소 (현지시정 3)

□ 하반기 추진계획

□ 하 절 기  재 난 예 방  안 전 점 검 : 2005. 6. 1 ∼ 6. 15.

□ 동절기대비 및 하반기 재난예방을 위한 안전점검 : 2005. 10월 ∼ 11월

□ 소방서, 익산경찰서 및 재난관리부서 협조 안전점검 : 수시

국민주택 등기서류 무료대서

□ 현    황

□ 국민주택융자금 채권확보를 위한 시장명의 소유권보존등기 물건 및

근저당 물건중 상환완료 세대에 대한 등기서류 무료대서

□ 소유권이전 및 근저당권해지 등기를 위한 관련서류 대서

□ 등기를 위한 비용(등록세, 교육세, 채권, 증지구입 등) 납부 안내

□ 대    상 : 1,027세대(소유권이전 487, 근저당권해지 540)

□ 주민 징수 종료년도 : 2009년

□ 추진실적

□ 추진기간 : 2005. 1월 ∼ 소유권이전 및 근저당권해지 완료까지

□ 추진실적 : 61세대(소유권이전 18, 근저당권해지 43)

□ 총 790만원 경제적 도움

□ 소유권이전 : 건당 20만원 정도

□ 근저당해지 : 건당 10만원 정도

□ 하반기 추진계획

□ 국민주택융자금 상환완료 후 등기이전 안내 및 무료대서를 통한

지속적인 주민편익의 행정서비스 제공으로 행정에 대한

신뢰감 구축

모현아파트 재건축 추진

□ 현    황

□ 위    치 : 익산시 모현동 1가 194번지 일원

□ 대지면적 : 63,765□(19,289평) / 일반주거지역

□ 건물규모 : 지상 5층, 연면적 54,565□(16,506평), 1,267세대

□ 건물준공 : 1978. 6. (25년 경과)

□ 재건축 추진계획

□ 대지면적 : 57,584□(17,419평) / 3종 일반주거지역

□ 건물규모 : 지상 14∼26층, 17동 1,591세대, 연면적 217,471□(65,784평)

□ 사업기간 : 2004. 9월 ∼ 2010. 12월

□ 추진실적

□ 도시계획위원회 자문                         2005. 1. 26.

(정비구역지정 및 제1종 지구단위계획)

□ 지방의회 의견 청취                          2005. 5.  2.

□ 정비구역 지정 신청(시□도)                  2005. 5. 18.

□ 금후 추진계획

□ 지방도시계획위원회 및 건축위원회 공동심의 (도)

□ 정비구역 지정고시 (도)

□ 재건축조합 설립인가 (시)

□ 사업시행인가 (시)

交 通 行 政 課

□ 一   般   現   況

□ 2005 豫算執行實績

□ 2005 上半期 成果 및 反省

□ 2005 主要業務推進狀況

一  般  現  況

□ 기    구

																									교 통 행 정 과 장
교 통 행 정 담 당													교 통 관 리 담 당													차 량 담 당				교 통 지 도 담 당				교 통 운 영 담 당
□ 과 소관 행정의 종합 기 획 조 정 □ 도시교통 종합계획 수 립 조 정 □ 예산 및 회계 관련업무 □ 충무계획관련업무 □ 교통안전 시설물 설치 및 관리 □ 교 통 유 발 부 담 금 부과 및 징수 □ 기타 타계에 속하지 않는 업무													□ 여객자동차 운송사업 신고 및 등록 □ 화물자동차 운송사업 신고 및 등록 □ 사업용 자동차 법규 위반 단속(택시제외) □ 여객자동차터미널관리 □ 시내버스 노선 관리 □ 대여 자동차 관리 □ 화물운송 주선업 및 전세버스 관리 □ 물류시설 및 유통단지 조성													□ 자동차 관리 업체 지 도 감 독 (정비업, 매매업, 폐차업) □ 자동차관리법 위반자 과태료 부과 징수 □ 노상 방치 차량 관리 □ 자동차관리법 개선 명령 □ 택시 미터기 검정에 관한업무				□ 불법주·정차지도단속 □ 사업용 자동차 법규 위반 단속(택시) □ 교통 안전진단 계획 수립 및 시행 □ 운수업체 종사자교육 □ 교통불편신고센타운영 □ 견인차 운영 관리 □ 교통사고 지수 분석 □ 주정차 금지구역 및 견인 구역 지정				□ 지능형교통시스템 (ITS) 설치 운영 □ 교통영향평가 관련 업무 처리 □ 주차장설치 및 관리 □ 민영주차장업무처리 □ 신호기 및 교통표지 판(유지보수) □ 과속방지턱 설치

□ 정·현 원

구분	계	5급	6급		7급				8급				9급		기능
		행정	행정	기계	행정	토목	기계	전문	행정	토목	기계	전기	토목	전기
정원	31	1	4	1	4	1			1	1	1	1	0	0	16
현원	31	1	4	1	4	1	1	1	2	0	0	1	1	1	13
증감							1	1	1	□1	□1		1	1	□3

□ 기타인원 : 20명 ( 일용 3, 공익요원 17)

□ 운 수 업 체 현 황

(2005.  5. 31)

구 분	계	버 스		택 시		화 물				렌트카	장의차
		시내	전세	회사	개인	용 달		일반 화물	개별 화물
						회사	개인
업체수	134	3	14	14	-	6	-	62	-	16	19
면허대수	4,620	175	308	691	948	13	427	1,273	477	278	30

□ 자동차관리업체현황

(2005.  5. 31)

계	매매업	정 비 업					폐차업	비 고
		소 계	종 합	소 형	원동기	부 분
317	44	268	30	7	1	230	5

□ 주  차  장  현  황

(2005.  5. 31)

계		노 상		노 외		건축물부설		주차장 확보율	비 고
개소	면수	개소	면수	개소	면수	개소	면수
3,253	63,183	46	2,949	231	8,878	2,976	51,356	63	자동차등록 100,769대

□ 교통신호기 관리현황

(2005.  5.  31)

신호등(면)			철주(지주)			신호기 설치 교차로(개소)
소계	보행등	차량등	소계	보행등	차량등
2,893	1,076	1,817	1,278	557	721	215

2005 豫算執行 實績

(2005.5.31현재)                                                        (단위:천원)

과 목			예산액	집행액	잔 액	비율 (%)	비 고
세항	세세항	목
총 계			26,028,174	6,435,161	19,593,013	24.7
소 계			15,008,902	2,792,270	12,216,632	18.6
교 통 행 정 운 영	인건비	수 당	98,764	42,805	55,959	43.3
		일 용 인 부 임	34,580	12,238	22,342	35.4
		일시사역 인 부 임	25,083	6,555	18,528	26.1
	경상적 경 비	일 반 운 영 비	287,751	104,963	182,788	36.5
		국내여비	40,200	16,151	24,049	40.2
		시책추진 업무추진비	800	255	545	31.9
		부서운영 업무추진비	3,660	1,184	2,476	32.3
		일 반 보 상 금	30,630	1,160	29,470	3.8
		민간경상 보 조	46,780	16,000	30,780	34.2
	보 조 사 업	민간이전	1,955,996	495,430	1,460,566	25.3
	자 체 사 업	민간이전	12,447,358	2,093,291	10,354,067	16.8
		자치단체등 이전	30,000	0	30,000	0
		자 산 취 득 비	7,300	2,238	5,062	30.6
소 계			11,019,272	3,642,891	7,376,381	33.1
교 통 안 전 시 설	보 조 사 업	시설비및 부 대 비	8,223,127	2,509,826	5,713,301	30.5
	자 체 사 업	시설비및 부 대 비	2,796,145	1,133,065	1,663,080	40.5

2005 上半期 成果및反省

□ 성    과

□ 교통체계개선을 위한 지능형교통시스템(ITS)설치 추진

□ITS기본계획 용역 완료

□투융자심사 및 국가예산 확보: 42억(국비32억, 시비10억)

□ 교통질서 확립 계도 및 단속으로 준법정신 함양

□불법주·정차 지도단속 :  8,502건, 349백만원

□ 민·관합동 야간단속 중점실시(월1회□2회)

□불법 주·정차 금지구역 표지판 일제점검 : 559개소

□주·정차금지구역 확대지정 : 6개노선 2.2□

□기존 90개노선 96.76□ □ 96개노선 98.96□

□사업용차량 불법운행 지도·단속 :  25건,  4,750천원

□ 시민에 대한 대중교통 서비스 향상 노력

□ 운수업체 운영실태 정기점검 및 서비스향상 지도 (2회)

□ 대중교통이용하기 운동 전개  : 5회(매월 1회)

□ 시민편익증진을 위한 교통관련민원해소

□ 신호등정비 186개소,  시내 및 시외도로 차선도색 3개노선 6.88□                      교통표지판 정비 200개소. 시내버스유개승강장 설치15개소, 마을공동주차장             설치 1개소, 어린이보호구역정비 13개교(이리초교외12개소)

□ 반    성

□ 주요 간선도로 불법 주·정차 근절 미흡

□ 주차난 해소를 위한 노외주차장 확보대책 미흡

2005 主要業務推進狀況

	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	어린이 보호구역 정비사업 지능형교통시스템(ITS)구축공약사업 교 통 신 호 기 정 비 사 업 차 선 도 색 정 비 사 업 시내버스 유개 승강장 설치 운수사업체선진교통문화정착 운수업체 유가 보조금 지급 버스업계 재정지원 추진 자동차관리사업체 관리 방치차량없는 거리 조성 주·정차 질서 확립 사업용차량 불법운행 단속

어린이 보호구역 정비사업

□ 사 업 개 요

□ 위     치 : 익산시 일원

□ 어린이 보호구역 지정(1995. 10월  경찰청, 교육청)

□지정대상 및 범위  : 초등학교 정문으로부터 반경 300M이내

□익산시 지정학교  : 63개교(초등학교 54, 유치원 9)

□ 사업기간 : 2003년 ∼ 2007년(5년간)

□ 2003까지 추진실적 : 2개교 370백만원(완료)

□ 상반기 추진실적

□ 2004 어린이 보호구역 사업 : 13개교 2,560백만원

□ 공사기간 : 2004. 12. 17 ∼ 2005. 10. 7.

□ 8개학교 칼라아스콘포장 완료

-  삼성. 용남. 성남. 고현. 송학. 남. 팔봉. 이리초교

□ 2005 어린이 보호구역 사업 : 10개교 1,270백만원

□ 실시용역 설계중(용역기간: 2005. 4. 7 ∼ 6. 29.)

□ 경찰서 및 교육청 협의

□ 하반기 추진계획

□ 2004 어린이 보호구역 사업 : 13개교 2,560백만원

□ 5개학교 칼라아스콘포장

- 천일어린이집.  중앙.  동산.  동북.  영등초교

□ 13개학교 교통시설물 설치(2005.  9월)

□ 2005 어린이 보호구역 사업 : 10개교 1,270백만원

□ 공사추진 : 10개학교(2005. 7월 ∼ 12월까지 완공 예정)

지능형 교통시스템(ITS)구축

□ 사 업 개 요

□ 위     치 : 익산시 관내 도심권 주요도로

□ 사업규모 : 3개분야 7개 시스템 도입

□교통관리 최적화분야 : 실시간교통제어, 돌발상황관리, 자동교통단속

□교통정보 활성화분야 : 교통정보센터 ,교통정보제공 시스템

□기   타    분   야  : 주·정차위반단속, 주차정보제공

□ 총   사  업  비 : 17,100백만원(국비6,300, 시비8,300 기타2,500)

□ 예산 확보액  :  4,200백만원(국비3,200,  시비1,000)

□ 사  업   기  간 :  2004년 ∼2014년

□ 상반기 추진실적

□ 대형공사 입찰방법 심의(도 지방건설기술심의위원회) : 2005. 4. 14

□ 설계자문위원회설치및운영조례 제정공포 (도시개발과) : 2005. 5. 20

□ 지능형교통체계(ITS) 구축사업 입찰안내서(안)작성 : 2005. 5. 31

□ 하반기 추진계획

□ 입찰안내서(안) 심의 요청 (도 지방건설기술심의회) ---- 2005. 6월

□ 공사 발주 의뢰 (익산시 □ 조달청) ------------------- 2005. 6월

□ 설계자문위원회 위원 대상자 조사 및 선임  ------------ 2005. 7월

□ 기본설계 시행 (참가업체) 및 심의 --------------2005.  8 ∼ 10월

□ 실시설계 시행 (실시설계적격자) 및 심의 ------- 2005. 11 ∼ 12월

□ 낙찰자 선정 및 사업 착수 -------------------------- 2005. 12월

교통신호기 정비사업

□ 사 업 개 요

□ 2005년도 사업비   -------------------  6개사업 1,558백만원

□ 교통신호기 유지보수 (단가계약)   -----------   250백만원  □ LED 신호등 교체공사 (33개소)   -----------   530백만원  □ 교통신호제어기 교체공사 (22개소)   ----------   180백만원  □ 교통신호기 신설 및 증설   -------------------   160백만원  □ 노후 철주, 맨홀, 전선관 교체 및 도색공사  --------   388백만원  □ 신호없는 횡단보도 조명등 설치 (5개소 : 추경)  ---  50백만원

□ 상반기 추진실적    -----------------------  3개사업  960백만원

□ 교통신호기 유지보수 (단가계약 : 2월)             250백만원          □ LED 신호등 교체공사 (4월준공)                      530백만원      □ 교통신호제어기 교체공사 (5월착공)                     180백만원

□  하반기 추진계획

□ 교통신호기 유지보수 (단가계약)  ------------   지  속  추  진

□ 교통신호기 신설 및 증설 ---------------------   2005. 10월 준공  □ 노후 철주, 맨홀, 전선관 교체 및 도색공사  --------   2005. 10월 준공  □ 신호없는 횡단보도 조명등 설치   --------------   2005.  8월 준공

차 선 도 색 정 비 사 업

□ 노선별 도색대상 현황                              (개소/KM)

계		국 도		지방도		시·군도
노선	연장	노선	연장	노선	연장	노선	연장
109	440	5	76	11	173	93	191

□ 사 업 개 요

□ 사 업 물 량 : 시내 및 시외 차선(2004년 미도색 노선)

□ 2005년도 사업비    -------------------      500백만원

□ 차선도색          -------------------     400백만원

□ 긴급민원 유지보수   ------------------     100백만원

□ 상반기 추진실적

□ 긴급민원 유지보수(단가계약) -----------      100백만원

□ 차선도색 (3개노선 6.88□)    -------------    67백만원

□ 노후 차선 실시설계 완료(35노선 56□) -----    230백만원

□ 하반기 추진계획

□ 긴급민원 유지보수 지속적 추진   ------       2005. 7월

□ 노후 차선 착공 및 준공   -------------       2005. 8월

□ 추석맞이 차선도색 (시내권)   ----------      2005. 9월

시내버스 유개 승강장 설치

□ 버스승강장 관리현황

계	기 설치			2005설치	비 고
	소계	유개	무개	유개
676	649	437	212	27

□ 사 업 개 요

□ 사업비   --------------------      2개사업  195백만원

□ 사업량

□ 시내버스 유개승강장 설치(27동)   ---------   165백만원

□ 시내버스 유지보수(676동)   ----------     30백만원

□ 상반기 추진실적

□ 유개 승강장 설치   ------------------------    15개소

□ 사업물량 조사 및 확정 : 2005. 3월

□ 실시설계 및 사업 완공 : 2005. 5월

□ 유개 승강장 보수 (단가계약 체결)  --------   2005. 3월

□승강장이전, 보수 및 재도색  :  20개소 12백만원,

□ 하반기 추진계획

□ 유개승강장 설치(12개소)    -----------      2005.  6월

□ 유개승강장 재 도색 및 보수  -----------     2005. 12월

운수사업체 선진교통문화 정착

□ 현       황

□ 전    체  : 134개업체 4,620대

□ 여객분야 :  17  □  1,814대(시내버스 3 / 175,     택시 14 / 1,639대 )

□ 화물분야 :  68  □  2,190대(일반 62 / 1,273,  용달 6 / 440, 개별 477)

□ 기   타 :   49  □   616대(렌트카 16/278,  장의차 19/30, 전세14/308)

□ 상반기 추진실적

□ 운수업체 운영실태 정기 점검실시 : 35개업체(여객17, 화물18)

□ 점검대상 : 여객 - 10대이상 등록업체, 화물 - 20대이상 등록업체

□ 점검결과 : 시정조치 20건(교통안전계획 미흡4, 건강검진미흡 16)

□ 운수종사자에 대한 친절교육 강화

□ 택시업계 활성화 방안을 위한 간담회 (1회) :  택시업체 및 노조 대표

□ 종사원 서비스 정신 함양을 위한 특별교육 (1회) : 1조합 948명

□ 운수종사자(시내버스) 제복비 지원 :  400명, 16,000천원

□ 대중교통 이용하기 운동전개(5회)    : 매월 둘째주 화요일

□ 하반기 추진계획

□ 운수사업체 위법□탈법행위 근절을 위한 정기점검 및 지도: 2회

□ 대중교통 서비스향상을 위한 수시 지도단속 : 시내버스 평가대비 지도점검

□ 대중교통 이용하기 지속적으로 실시 : 유관기관 확대

운수업체 유가 보조금 지급

□ 사 업 개 요

□ 지 급 대 상  ----------------------    85개업체 · 4,004대

□ 시내버스 3사·175대, 택시 14사·1,639 (개인 948), 화물 68사·2,190대

□ 지급기준(□당) : 버스 -168.11원, 택시(LPG) -194.70원, 화물 -152.83원

□ 예  산  액  -------------------------------   12,445백만원

□ 시내버스 1,018백만원,  택시 3,948백만원,  화물 7,479백만원

□ 1회 추경 확보 : 7,745백만원

□ 상반기 추진실적

□ 운수업체 보조금 지급 지침 시달 : 2005. 1월

□ 보조금 신청 방법 및 신청시 구비서류 등

□ 운수업체 보조금 신청 및 지급(1기분) : 2,092백만원

□ 시내버스:212백만원, 택시:909백만원, 화물: 971백만원

□ 하반기 추진계획

□ 운수업체 유가보조금 지급 : 분기 익월지급

□ 보조금 지급에 따른 운수업체 및 증빙서류 발급업체 점검

□ 허위신청 및 부정한 방법으로 수령시 보조금 환수 및 지원중단

□ 문제점 및 대책

□ 건교부의 주행세 유가보조금이 적기 미배분으로 지급 시기지연

□ 건교부(도)에 보조금 조기배정 건의

버스업계 재정지원 추진

□ 현      황

□ 지원사업

□ 수익성이 없는 노선(적자노선) 운행에 따른 손실보전

□ 벽지노선 운영에 따른 손실보상

□ 예 산 액 : 1,956백만원( 도비593, 시비 1,363)

□ 지원기준

□ 건설교통부 지정 벽지노선 25개노선

□ 적자노선 및 비수익노선 손실보전

□ 상반기 추진실적

□ 1/4분기 벽지노선손실보상금 지원(25개노선, 익산여객외 2개업체) : 68백만원

□익산여객 31백만원, 신흥여객 20백만원, 광일여객 17백만원

□ 1/4분기 시내버스 재정 지원 : 428백만원

□익산여객 203백만원, 신흥여객 130백만원, 광일여객 95백만원

□ 하반기 추진계획

□ 2005년 시내버스 적자노선 실차조사 용역 ------------- 8월중

□ 시내버스 재정지원 분권 교부세 증액분(55백만원)------ 결산추경

□ 재정지원금 및 벽지노선  손실보상금 지원(2,3,4분기)--7,10,12월 지급

자동차관리사업체관리

□ 현       황

□ 자동차 관리사업체    -------------------------    317개업체

□정비업 268, 매매업 44, 폐차업 5

□ 상반기 추진실적

□ 자동차 관리사업자 준수사항 홍보 :  분기 1회

□ 자동차관리법시행규칙 및 관련조례개정내용등 홍보

□ 자동차관리사업체가 꼭 알아야 할 법규내용등 홍보

□ 무단폐업 자동차 매매사업체 일제점검 : 1회

□ 무단폐업 자동차매매업체(6개소) 행정처분 진행중

□ 자동차관리사업체 지도 점검 : 1회

□자동차정비업 268, 자동차폐차업5,

□과징금 5개업체, 등록취소 1개업체(진행중)

□ 하반기 추진계획

□ 자동차매매업 지도·점검 및 위반업체 행정처분 : 10월중

□ 무등록자동차정비업체 지속적 단속

방치차량없는 거리조성

□ 현       황

년 도 별	2001년	2002년	2003년	2004년	2005. 5월
발생대수	374대	165대	197대	195대	66

□ 상반기 추진실적

□ 무단 방치차량 처리 : 66대(자진처리3, 처리중34, 강제처리29)

□ 현장 자진처리 : 168대

□ 무단 방치 행위 방지를 위한 대시민 홍보

□ 자진처리유도 사전 예고장 발부 : 234회

□ 내고장 소식지 및 시청 홈페지  : 각1회

□ 지역생활 정보지 : 1회

□ 무단방치 일제정리기간 설정 운영  :  1회(4월)

□ 무단 방치 차량 신고 전담반 편성운영

□ 읍, 면지역 : 종합행정 담당직원 및 리·반장

□ 동지역(시내권)  :  주차단속요원 및 차량팀

□ 하반기 추진계획

□ 무단방치 차량 일제 정리기간 운영       : 1회(10월)

□ 자동차 무단방치 행위자에 대한 통고처분 : 법칙금 부과

□ 자진처리 불이행자 검찰송치 등 사법조치 확행

주·정차  질 서  확 립

□ 현       황

□ 단속구역  :  90개노선,  96.76km(견인구역 : 81개노선 93.13km)

□ 단속인력  :  6 개조 25명 (단속기능 8,       공익요원 17)

□ 단속장비 :  25 대        (순찰차 4, 무전기 9,  카메라 12)

□ 상반기 추진실적

□ 불법 주·정차 지도 단속       :  8,502건   349백만원

□일반 근무시간 단속          :  7,801건   320  □

□민·관합동 야간단속         :    246건    10  □

□북부시장 특별 단속          :    455건    19  □

□ 익산역 환승장 휴일근무 운영 : 1개반 2명(계도장 발부)

□ 교통질서지키기 홍보활동 : 반회보5회, 순찰차 계도방송 등

□ 주·정차금지구역 및 견인구역 확대지정 의뢰:  6개노선 2.2km

□ 하반기 추진계획

□ 불법 주· 정차 야간단속   :    매월 1회

□ 주·정차금지 표지판 일제점검 : 5개노선 19.5□

□ 남북로, 동서로, 인북로, 중앙로, 산업도로

□ 신규지정 노선 표지판 정비 : 6개노선 2.2□

사업용차량 불법운행단속

□ 현       황

□ 사업용차량 보유대수  ---------------------------- 4,620대

□ 승 용 차  ---- 1,917대(택시 1,639,  렌트카 278)

□ 승 합 차  ----   513□(시내 175, 전세 308, 기타 30)

□ 화 물 차  ---- 2,190□(일반 1,183,  개별 477,  용달 440, 기타90)

□ 단 속 대 상

□ 화물차, 승합차 : 포장미덮개운행, 결행·단축운행, 밤샘주차

□ 영업용택시, 렌트카 : 부당요금, 호객행위, 승차거부, 합승, 불친절등

□ 상반기 추진실적

□ 사업용차량 불법운행 단속        :  과징금 25건,  4,750천원

□밤샘주차, 부당요금, 호객행위, 택시부제 불이행차량, 승차거부 등

□ 운수업체 안전운행 지도 점검 : 2회(분기별1회)

□ 하반기 추진계획

□ 사업용 차량 유입지역 불법행위 단속강화 : 역, 터미널 주변 등

□부당요금, 호객행위, 승차거부, 합승 등

□ 운수업체 안전운행 지도 점검 : 분기 1회

□ 불법운행 다발업체 및 운수업체 종사자 친절교육  :  17개업체, 2,243명

車輛登錄事業所

□ 一   般   現   況

□ 2005 豫算執行實績

□ 2005 上半期 成果 및 反省

□ 2005 主要業務推進狀況

一  般  現  況

□ 기    구 : 1소 2담당

			차량등록사업소
관 리									등 록
□ 예산, 회계 □ 일반서무, 보안, 문서관리 □ 주요 시책업무 추진 □ 물품 및 공인관리 □ 자동차등록원부 발급 □ 자동차번호판 제작소 관리 □ 이륜자동차 등록 및 관리									□ 자동차등록(신규,이전,변경,말소) □ 자동차 저당, 압류, 해제 □ 자동차 정기검사 □ 자동차관리법위반 과태료부과 징수 □ 의무보험 미가입자 과태료 부과 징수 □ 무보험운행자 범칙금부과 및 검찰송치 □ 건설기계등록 및 조종사 면허증 발급

□ 정·현원

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능	비고
정 원	11		1	2	2	2		4
현 원	12		1	2	4			5
증·감	1		·	·	2	□2		1

□ 기타 : 3명(일용)

□ 차량 등록 현황 (2005.05.31 현재)

□ 등록대수 : 114,704대(자동차 100,784, 건설기계 2,576 이륜자동차 11,344)

□ 자 동 차

구 분	합 계		승 용		승 합		화 물		특 수
계	100,784		67,691		7,488		25,413		192
관 용	354		93		54		194		13
자가용	95,646		65,651		6,915		23,009		71
영업용	4,784		1,947		519		2,210		108
2004.12월	99,822		66,665		7,698		25,273		186
전년대비(%)	962	(1)	1,026	(1.5)	-210	(-2.7)	140	(0.6)	6	(3.2)

□ 건설기계

구 분	합 계		굴삭기		덤프트럭		지게차		불도저외22
계	2,576		666		192		1,225		493
관 용	24		10		3		5		6
자가용	1,744		288		54		1,143		259
영업용	808		368		135		77		228
2004.12월	2,502		644		181		1,198		479
전년대비(%)	74	(3)	22	(3.4)	11	(6.1)	27	(2.3)	14	(2.9)

□ 이륜자동차

구 분	합 계		50cc이상		100cc이상		260cc이상		비 고
계	11,344		7,965		3,254		125
관 용	127		60		65		2
자가용	11,217		7,905		3,189		123
2004.12월	11,389		8,124		3,140		125
전년대비(%)	-45	(-0.4)	-159	(-2)	114	(3.6)	0	(0)

□ 자동차 및 건설기계 관련업체 현황

구 분	자 동 차	건설기계	비 고
계	54	6
매매상사	44	6
폐차장	5
검사소(출장소)	1
번호판제작소	4

□ 등록민원 처리 (2005.05.31 현재)

구분			처리건수		비 고
			누계	2005.5월
합계			167,059	26,709
자동차	소 계		164,789	26,135
		신규등록	2,382	445
		변경등록	14,054	2,715
		저당권설정	3,023	606
		검 사	138	24
		말소등록	1,263	240
		이전등록	6,141	1,282
		압류등록	64,182	6,076
		말소증명서교부	264	84
		등록원부발급	56,609	11,609
		등록증발급	4,657	868
		의무보험(책임,대물)	8,399	1,389
		자동차관리법과태료	3,538	762
		무보험운행자범칙금부과 및 송치	139	35
건설기계			1,420	279
이륜차			850	295

□ 전년대비 : 3,341건(2.0%) 증가 -> 자동차 대물보험 업무 증가

1일 평균 민원처리건수 -> 1,491건

2005 豫算執行 實績

(2005.5.31현재)                                                (단위:천원)

과 목			예산액	집행액	잔 액	비율 (%)	비 고
세항	세세항	목
총 계			305,823	93,548	212,275	30.6
소 계			305,823	93,548	212,275	30.6
차량등록 사 업 소 운 영	인건비	수 당	38,922	14,525	24,397	37.3
		일 용 인 부 임	12,228	2,139	10,089	17.5	제1회 추 경
		일시사역 인 부 임	23,909	7,843	16,066	32.8
	경상적 경 비	일 반 운 영 비	119,086	26,140	92,946	22
		국내여비	11,880	4,908	6,972	41.3
		정원가산 업무추진비	330	81	249	24.5
		시책추진 업무추진비	500	45	455	9
		부서운영 업무추진비	2,400	541	1,859	22.5
		직 책 급 업무추진비	1,200	500	700	41.7
	자 체 사 업	민간이전	1,560	650	910	41.7
		시설비및 부 대 비	76,775	19,878	56,897	25.9
		자 산 취 득 비	17,033	16,298	735	95.7

2005 成果 및 反省

□ 성      과

□ 민원업무 처리 : 167,059건

□ 자  동  차 : 164,789건

□ 신규 2,382건, 말소 1,263건, 이전 6,141건, 압류 64,182건,

저당 3,023건, 등록원부 발급 및 열람 56,609건,

의무보험 8,399건, 자동차검사 3,538건, 기타 19,252건

□ 건 설 기 계 : 1,420건

□ 이륜자동차 :   850건

□ 자동차 양도증명서 백지용지 교부장소 확대 : 31개소

□ 시  행  일 : 2005년 3월부터

□ 교 부 장 소 : 31개소(29개 읍면동,종합민원과,차량등록사업소)

□ 자동차 의무보험 가입 강화

□ 대물보험가입 의무화, 무보험차량 운행자 범칙금 부과 안내

□ 반상회보 5회, 홈페이지 1회

□ 의무보험 미필자 과태료 부과 : 2,566건 318,151천원

□ 의무보험 미필 운행자 범칙금 부과 및 검찰송치 : 139건 41,100천원

□ 반      성

□ 자동차 의무보험 변경에 따른 홍보 미흡

□ 시 홈페이지 및 반상회보 현수막 등 변경사항 지속홍보

□ 대물보험 의무가입과 무보험차량 운행 자동차보유자 범칙금 부과

2005 主要業務推進狀況

	□ □ □	시민에대한 최선의 행정서비스 제공 자동차 양도 증명서 교부 방법 개선 자 동 차 관 련 민 원 안 내

시민에 대한 최선의 행정서비스 제공

□ 사 업 개 요

□ 정기적인 업무연찬회 및 친절실천훈련 교육 실시

□ 민원인이 정감을 느끼는 쾌적한 환경조성

□ 민원처리 만족도 및 친절도 설문조사 실시

□ 상반기 추진실적

□ 정기적인 업무 연찬 실시 : 5회/매월 첫째주 수요일

□ 전화응대,내방민원 친절실천 훈련 : 22회/주1회

□ 민원인이 정감을 느끼는 분위기 및 쾌적한 환경조성

□ 미소짓는 얼굴로 먼저 인사 및 응대하기, 화분 10종 배치

□ 민원처리 만족도 및 친절도 설문조사 실시

□ 기    간 : 2005. 5. 16 ∼ 5. 20

□ 설문대상 : 방문민원인 100명(무작위 선정)

□ 내    용 : 친절도, 시민만족도, 불편·건의사항 등 11개 항목

□ 설문결과

□ 항목별 친절 만족도 90% 이상 만족으로 평가

□ 불편·건의사항으로 사무실 확장하여 PC방 및 민원편의시설 설치, 쾌적한 환경을 위한 공기청정기 설치 등

□ 하반기 추진계획

□ 정기적인 업무연찬회 개최 : 매월 1회 첫째주 수요일

□ 청사 내부수선 및 도색 실시 : 11월

□ 공사면적 562□,  소요예산 53,092천원

□ 상반기 설문결과 민원편의시설 설치 검토

□ 전화응대 및 방문민원 친절훈련 지속실시 : 매주 1회

□ 민원처리 만족도 및 친절도 하반기 설문조사 실시 : 11월

자동차 양도증명서 교부방법 개선

□ 현       황

□ 자동차 이전등록대수 : 6,141대 / 1일 55대(2005.5.31 현재)

□ 문  제  점

□ 당사자 거래용 양도증명서는 시·도지사가 제작한 것만

유효하므로

□ 민원인이 배부장소인 차량등록사업소에 2회 방문하여 이전등록

□ 1회 방문시 : 당사자간 거래시 양도증명서 수령

□ 2회 방문시 : 양도증명서 작성후 이전등록 신청

□ 상반기 추진실적

□ 자동차 양도증명서 백지용지 교부장소 확대 : 31개소

□ 차량등록사업소 □ 종합민원과, 읍·면·동사무소 민원실 확대

□ 교부대장에 과, 읍·면·동별 일련번호 기재하고 수령자 서명후 교부

□ 기 대 효 과

□ 자동차 이전시 양도증명서 수령으로 인한 민원인 시간 및 경제적 부담 감소

자동차 관련민원 안내

□ 사 업 개 요

□ 자동차 민원안내용 리후렛 및 책자 발간 배부

□ 자동차 정기검사 및 사업용자동차 정기점검 경과 안내문 발송

□ 자동차 의무보험(대인,대물) 가입 촉구

□ 상반기 추진실적

□ 자동차 정기검사 및 사업용 자동차 정기점검 경과 안내문 발송

□ 15회 7,520건/ 검사 미필시 월3회 반복 안내

□ 자동차 정기검사 사전 안내문 발송

□ 월 1회 전북교통안전관리공단, 익산시 자동차 정비협의회를

통한 자동차 정기검사 사전 안내

□ 자동차 의무보험 가입촉구서 발송

□ 15회 6,945건/ 자동차관리망으로 보험개발원 자료수신 월3회

□ 하반기 추진계획

□ 자동차 민원안내용 자료 발간 배부

□ 리후렛 5,000부 발간, 방문 민원인 배부 및 정기검사 의무보험등 안내

□ 업무편람 500부 발간, 시·읍·면·동 민원실, 자동차매매사업조합,

상사, 폐차장, 검사소, 검사장, 번호판제작소등 배부하여 민원안내

□ 기 대 효 과

□ 자동차 민원 사전안내로 시민 불이익 예방 및 민원인 편리

	□ □	주 차 장 확 보 추 진 종 합 물 류 유 통 단 지 조 성

주차장 확보 추진

도심지역의 주차시설 부족으로 교통혼잡 등 교통사고를 유발시키고

있으므로 중·장기적으로 주차장을 확보하여 고질적인 주차난 해소

□ 주차장 현황

계		노 상		노 외		건축물부설주차장		비고
개소	면수	개소	면수	개소	면수	개소	면수	자동차등록대수 (2005. 5월)
3,253	63,183	46	2,949	231	8,878	2,976	51,356	100,769대

□ 주차장 3,253개소 63,183면으로 주차장 확보율 62.70%

□ 추 진 계 획

□ 노외주차장 실태파악 및 현황 조사

□ 공한지, 공유지 실태파악 및 주차장 설치가능 부지 선정

□ 예산확보후 부지매입, 실시설계 및 공사 시행

□ 사유지의 노외주차장 설치 유도로 주차장 확보 강구

□ 문제점 및 대책

□ 매년 자동차 등록대수 및 이용률 증가에 따른 도심권 주차난 발생

□ 부지 매입시 사업비 과다소요(중앙, 창인, 영등, 신동 , 부송지구 등)

□ 중·장기적 주차장 확보 대책 마련으로 연차적인 주차난 해소 방안 강구

□ 지평식주차장을 가급적 지양하고 주차빌딩 건립 추진

□ 건 의 사 항

□ 중·장기적 주차장 확보에 따른 용역비 계상

□ 15개 읍면 22개소 381백만원 추경 계상

종합물류유통단지조성

□ 사 업 개 요

□ 위    치 : 익산시 일원

□ 면    적 : 323,000□(10만평정도)

□ 주요시설 : 화물터미널, 집·배송단지, 창고, 도·소매단지, 상업                    및 업무지원 시설 등

□ 사업기간 : 2004년 ∼ 2007년

□ 상반기 추진실적

□ 익산시 의회 의원 간담회 실시                 : □04.  1. 27

□유통단지 조성은 터미널 등 복합적으로 연계설치토록               종합계획이 되어야함

□ 종합물류유통단지 개발 협조 의뢰(시□토지공사): □04.  3. 19

□ 한국토지공사 지역발전협력단장 시 방문면담    : □04. 10. 14

□ 추진계획 협의 및 향후계획안 제출(6만□10만평)

□ 종합물류 유통단지 개발 협조 촉구             : □05. 03. 14

□ 하반기 추진계획

□ 유통단지 개발 계획안 등 토지공사 방문 협의 추진 : 8월중

□ 기       타

□ 토지공사에서 익산시 혁신도시 안착 가능성과 연계 검토         하고 있어 적극적 대응 미약함.

□ 유통단지 조성에 최적의 편리한 교통의 요충지로서의 입지

조건을 부각시켜 적극적인 협조 당부