2010.  7.

제146회 익산시의회(임시회)

― 상반기 추진실적 및 하반기 추진계획 ―

2010 주요업무보고

www.iksan.go.kr

상하수도사업단

보 고 순 서

□	일반현황	………	1
□	상수관리과	………	7
□	하수관리과	………	27

일   반   현   황

□ 기구 및 정․현원

◦ 기    구  ………………………………………………   2과 11담당

														상하수도사업단
				상수관리과																					하수관리과
상수행정			요금			급수시설				누수방지					정수생산			수질실험				하수행정				하수관리					하수시설			하수운영				생 활 하 수 (사설)

◦ 정․현  원

(정원 / 현원)

구 분	정원	현원	증감	직 급 별
				4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구	계약	기능
계	76	79	3	1 1	2 2	11 12	14 18	10 5	1 0	2 2	0 1	35 38
상수관리과	52	55	3	1 1	1 1	6 6	6 8	5 2	1 0	2 2	0 1	30 34
하수관리과	24	24			1 1	5 6	8 10	5 3	0 0			5 4

※ 기타 59명(청원경찰 8, 무기계약근로자 8, 기간제근로자 30, 준설원 13)

□ 수돗물평가위원회 현황

(단위 : 명)

구 성	위 원				임 기	비 고
	공무원	시의원	교수	시민단체
10	4	1	2	3	2 년	남 6, 여 4

※ 근 거 : 수도법 제30조의1,  익산시 상수도급수조례 제51조

□ 상수도 급수 현황

(단위 : 명)

구 분	총인구	급수인구	보급율(%)	시설용량(천㎥)
				계	자 체	광 역
계	305,140	300,119	98.4	215.7	125.0	90.7
도심권	237,775	237,537	99.9	181.7	125.0	56.7
읍면권	67,365	62,582	92.9	34.0	-	34.0

□ 상수도 급수시설 현황

(단위 : ㎥/일)

구 분			시설용량	급 수 량		비 고
합 계			215,700	139,854
생 활 용 수			180,700	123,235	(100%)
	광 역 상수도	전주권 광역	90,700	45,189	( 37% )
	자 체 시 설	소 계	90,000	78,046	( 63% )
		신흥정수장	60,000	51,645
		금강정수장	30,000	26,401
공 업 용 수			35,000	16,619

□ 상수도 사용 현황

(단위 : 전, ㎥)

구 분 업 종	급수전수	월평균 사용량	비율(%)	비 고
계	58,008	2,946,301	100
가 정 용	45,771	1,412,010	47.9
일 반 용	11,740	641,273	21.8
산 업 용	411	300,755	10.2
대중탕용	39	10,113	0.3
전용공업용	47	582,150	19.8

□ 상수도 관로 현황

(단위 : ㎞)

구 분	시설계획 (%)	시 설	미시설	시설비율 (%)	비고
계	1,195.5 (100)	1,137.6	57.9	95
송수관	31.6 ( 3)	31.6	0	100
배수관	1,163.9 ( 97)	1,106.0	57.9	95

□ 상수도 시설 현황

시 설 명	개 소	시설용량	비 고
정 수 장	2	125,000㎥/일	신흥, 금강
배 수 지	6	43,500㎥	신흥, 금강, 금마, 팔봉, 함열, 용안
가 압 장	1	34,000㎥/일	금마
보조수원지	1	1,053,000㎥	신흥

□ 하수도 사용 현황

(단위 : 전)

구 분 업 종	계	상하수도	지 하 수	비 고
계	34,251	33,815	436
가 정 용	25,074	25,060	14
일 반 용	8,716	8,384	332
대중탕․산업용	461	371	90

□ 하수도 관로 현황

(단위 : km)

구 분	시설계획	시 설	미시설	보급율(%)	비 고
계	1,642	1,094	548	66.6
우 수 관	1,127	676	451	59.9
오 수 관	453	365	88	80.5
차 집 관	62	53	9	85.5

□ 하수처리시설 현황

시 설 명	개 소	처리용량	비 고
계	28	139,578㎥/일
익산공공하수처리시설	1	100,000㎥/일
함열공공하수처리시설	1	6,000㎥/일
북부공공하수처리시설	1	30,000㎥/일
금마공공하수처리시설	1	1,100㎥/일
여산공공하수처리시설	1	600㎥/일
소규모 공공하수처리시설	22	1,728㎥/일
분뇨처리장	1	150㎥/일

※ 공사 중 - 오산공공하수처리시설 490㎥/일(공정 50%)

□ 부서별 주요업무

부 서	주 요 업 무
상수관리과	∙상수도 종합계획수립, 상수도특별회계 현금출납 및 금고감독 ∙예산편성 및 결산, 계약, 공유재산관리 ∙상수도사용료 조정, 계량기 교체 ∙상수도정비기본계획수립, 급․배수공사 설계 및 감독 ∙간이상수도 및 소규모급수시설관리, 개인급수공사 ∙누수방지 및 누수탐사 기획, 노후관 개량공사 및 감독 ∙정수생산, 정수시설물관리, 읍․면배수지 관리 ∙상수도 수질실험, 상수원 및 지하수 수질검사 ∙정수약품 관리, 상수원 보호구역 관리
하수관리과	∙하수도 종합계획 수립, 하수도 특별회계 현금출납 및 금고감독 ∙계약, 하수도사용료 및 원인자부담금 부과징수 ∙시내일원 긴급하수도공사, 생활민원처리 ∙하수도기계준설 및 맨홀정비, ∙하수관거임대형민간투자사업, 하수관거정비재정사업 ∙익산금마처리구역하수관거정비사업, 금마하수처리장주민숙원사업 ∙유천생태습지조성 및 생태하천복원사업, 하수처리방류수재이용사업 ∙하수슬러지처리시설 설치사업, 공공하수처리시설 악취방지사업 ∙개인하수처리시설설치신고․준공․지도점검 ∙분뇨수집 운반업 허가 및 지도점검

□ 2010 예산집행실적

【 2010. 6. 30 현재 】                                    (단위 : 천원, %)

구 분	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
계	75,657,152	29,875,434	45,781,718	39.5
상수관리과	28,109,488	13,463,087	14,646,401	47.9
하수관리과	47,547,664	16,412,347	31,135,317	34.5

상수관리과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2010 예 산 집 행 실 적
□	2010 상반기 성과 및 반성
□	2010 주 요 업 무 계 획

비전 및 중점추진방향

	비 전
최상의 고객서비스를 통한 최고의 수돗물 공급

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦ ◦	상수도 공급 확대를 위한 상수도 급수구역 확장 고도정수처리 및 수질강화를 통한 수질고급화 추구 시민고객 중심의 수질검사 강화로 맛있는 수돗물 생산․공급 유수율 향상을 통한 상수도 경영합리화 도모

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	노후 송․배수관 교체로 수질저하 원인제거 및 최적관망 유지 24시간 수질 자동측정시스템 운영 안전한 원수 수질관리 민․관합동 수돗물 채수․수질검사와 수돗물 생산견학 확대 유수율 증대를 통한 경영효율성 제고 및 상수도사용료 현실화

일   반   현   황

□ 기     구

											상수관리과
상 수 행 정				요 금						급 수 시 설					누 수 방 지				정 수 생 산						수 질 실 험

□ 정․현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별									비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구	계약	기능
정 원	52	1	1	6	6	5	1	2	0	30
현 원	55	1	1	6	8	2	0	2	1	34
증 감	3				2	△3	△1		1	4

※ 기타 46명 (청원경찰 8, 무기계약근로자 8, 기간제근로자 30)

□ 사  무  분  장

◦	상수행정	:	상수도종합계획수립, 예산편성 및 결산, 입찰 및 계약, 공유재산관리
◦	요 금	:	급수사용료조정, 수입예산정리 및 정산, 계량기교체
◦	급수시설	:	상수도정비기본계획수립, 급․배수공사설계 및 감독, 공동주택저수조 청소, 간이상수도 및 소규모급수시설관리, 개인급수공사
◦	누수방지	:	누수방지 및 누수탐사기획, 노후관개량공사 및 감독, 누수탐사, 누수처보수, 상수도관망도 정리, 변류수리 및 교체
◦	정수생산	:	정수생산기획조정, 정수장시설물관리, 읍면배수지관리
◦	수질실험	:	수도수질실험 기획, 상수원수질검사, 지하수 수질검사, 정수약품 구입관리, 상수원보호구역관리, 수도꼭지 수질검사

2010 예산집행실적

【 2010. 6. 30 현재 】                                       (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율	비고
상수관리과				28,109,488	13,463,087	14,646,401	47.9
	상수도사업비용			20,026,173	8,724,497	11,301,676	43.6
		영업비용		19,448,247	8,717,993	10,730,254	44.8
			원수 및 취수비	9,958,368	4,813,835	5,144,533	48.3
			정수비	1,627,438	911,899	715,539	56.0
			급수비	283,980	94,069	189,911	33.1
			일반관리비	4,623,958	1,993,202	2,630,756	43.1
			징수 및 수용가관리비	1,607,059	604,244	1,002,815	37.6	노후계량기 교체
			급수공사비	1,347,444	300,744	1,046,700	22.3
		영업외비용		127,926	6,504	121,422	5.1
			지급이자	127,926	6,504	121,422	5.1	시기미도래 (12월)
		예비비		450,000	0	450,000	0.0
			예비비	450,000	0	450,000	0.0
	자본적지출			8,083,315	4,738,590	3,344,725	58.6
		가동설비자산		7,077,095	4,560,390	2,516,705	64.4
			건물	20,000	17,160	2,840	85.8
			구축물	5,698,286	3,642,034	2,056,252	63.9
			기계장치	1,201,209	774,987	426,222	64.5
			차량운반구	115,000	91,010	23,990	79.1
			공기구비품	42,600	35,199	7,401	82.6
		고정부채상환금		572,680	178,200	394,480	31.1
			지역개발기금	350,000	0	350,000	0.0	시기미도래 (12월)
			정부차입금	213,300	178,200	35,100	83.5
			기타고정부채	9,380	0	9,380	0.0	시기미도래 (12월)
		예비비		433,540	0	433,540	0.0
			예비비	433,540	0	433,540	0.0

2010 상반기 성과 및 반성

□ 성      과

◦ 농촌마을 상수도 급수구역 확장으로 주민편익 증진

▸20개마을 / 27.0㎞ / 2,281백만원(국 1,597  시 684)

◦ 급수불량지역 민원해소	원팔봉마을 등 270세대 혜택

◦ 유수율 증대를 위한 누수방지사업	506백만원

▸노후관 교체(D50 ~ 150mm)  :  4.3㎞

▸누수처 보수 및 변류정비  :  400여개소

◦ 상수도 사용료 부과징수

▸부과액  :  11,544백만원

▸징수액  :  11,281백만원(97.7%)

◦ 시민이 참여하는 수돗물 수질검사로 신뢰도 증대

▸민․관합동 수질검사  :  2회

▸수돗물 생산과정 견학  :  21회 717명

□ 반      성

◦ 부실검침으로 인한 민원발생

▸담당직원 정신교육 강화로 정확한 검침 및 민원발생 최소화

2010 주요업무계획

		농촌마을 상수도 급수구역 확장 급수불량지역 민원해소 유수율 증대를 위한 누수방지 사업 신흥정수장 중앙감시제어 설비 교체 수도정비기본계획 변경 용역 효율적 정수시설 운영관리 신뢰받는 수돗물 수질관리

1		농촌마을 상수도 급수구역 확장

○ ○	지하수 오염으로 인한 농촌마을 상수도 공급으로 식수불편 해소 안심하고 마실 수 있는 수돗물 공급으로 시민보건위생 향상

□ 사 업 개 요

◦ 위    치	왕궁면 중리마을 등 25개마을

◦ 사 업 량	배수관부설  L=34.3㎞  /  3,017백만원

▸국비사업 : 생활용수개발사업  16개마을  /  2,000백만원

▸시비사업 : 덕기동 하남마을 등 9개마을  /  1,017백만원

◦ 사업기간	2010.  1. ~ 2010.  9.

□ 상반기 추진실적

◦ 현장조사 및 설계	2010. 1. ~ 2010. 2.

◦ 발 주  및  착 공	2010. 3. ~ 2010. 4.

◦ 공   사   준   공	2010. 6. 30.

▸왕궁면 중리마을 등 20개마을 배수관 부설 L=27.0㎞ / 2,281백만원

□ 하반기 추진계획

◦ 왕궁면 각봉마을 등 5개마을 배수관부설(L=7.3㎞ / 736백만원)

◦ 공사준공	2010. 9. 30.

※ 농촌마을 상수도 보급률  :  연초  91% ⇒  94%(3%증가)

2		급수불량지역 민원해소

○ ○	고지대로 인해 수압이 약한 곳 가압장 설치로 주민편익 증진 상수도 혜택을 받지 못해 소외된 곳 민원해소

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간	2010. 1. ~ 2010. 12.

◦ 사업내용	고지대 및 상수도 수급 불편지역 민원해소

◦ 사 업 비	307백만원

□ 상반기 추진실적

◦ 팔봉동 원팔봉마을 가압시설 연결공사(40세대 / 19백만원) : 2010. 3.

◦ 오산면 신후마을 외 13개소(30세대 / 70백만원) : 2010. 3. ~ 6.

◦ 여산면 신리마을 배수관 연결공사(130세대 / 9백만원) : 2010. 4.

◦ 팔봉동 당산마을 가압장 설치(70세대 / 15백만원) : 2010. 5.

□ 하반기 추진계획

◦ 마동 2청사부근 가압장 설치(650세대 / 97백만원)	2010. 7. ~ 9.

◦ 북부시장 뒤 가압장 설치(1,080세대 / 87백만원)	2010. 7. ~ 9.

◦ 여산면  관연마을 가압시설 설치(20세대 / 10백만원)	2010. 7.

3		유수율 증대를 위한 누수방지 사업

○ ○	수도시설의 개량화로 누수예방 및 안정적인 수돗물공급 유수율 제고사업의 적기시행으로 누수로 인한 예산낭비 방지

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간	2010. 1. ~ 2010. 12.

◦ 사업내용

▸노후관 교체

▸블록화구역 유량계 원격감시시설 설치공사

▸누수처 긴급보수공사

▸변류교체 및 정비공사

◦ 사 업 비	1,340백만원

□ 상반기 추진실적

◦ 노후관 교체(5개소 / 213백만원)	2010. 1. ~ 6.

◦ 누수처 보수 및 변류정비(400여개소 / 239백만원)	2010. 1. ~ 6.

□ 하반기 추진계획

◦ 유량계 원격감시시설 설치(7개소 / 54백만원)	2010. 7. ~  9.

◦ 노후관 교체공사(3개소 / 192백만원)	2010. 7. ~  9.

◦ 누수처 보수 및 변류정비(400개소 / 300백만원)	2010. 7. ~ 12.

◦ 관로 누수탐사(323.3㎞ / 136백만원)	2010. 7. ~  8.

4		신흥정수장 중앙감시제어 설비 교체

○ ○	최첨단 시스템 구축으로 과학적인 평가 및 종합적 분석가능 정수생산과정 및 수돗물 흐름의 감시통제로 각종사고 신속한 대처

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  :  익산시 신흥동 신흥정수장

◦ 사 업 량  :  중앙감시제어설비 1식

▸자동제어 통합시스템 구축 및 프로그램 설치

▸현장계측설비, 폐쇄회로, 원격제어 시스템 구축

▸배관, 배선 및 기타 부대공사

◦ 사 업 비  :  800백만원

◦ 사업기간  :  2010. 2. ~ 2010. 12

□ 상반기 추진실적

◦ 실시설계 용역	2010. 2. ~ 2010. 4

◦ 실시설계심의위원회 설계심의 및 일상감사	2010. 4

◦ 공사발주 및 착공	2010. 5. ~ 6.

□ 하반기 추진계획

◦ 공사시공 및 준공	2010. 7. ~ 2010. 12.

5		수도정비기본계획 변경 용역

○ ○	수도정비기본계획의 변경수립으로 상수도시설에 대한 효율적 관리 안심하고 마실 수 있는 수돗물의 안정적 공급대책 마련

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  :  익산시 전역 / 506.65㎢

◦ 과업내용

▸급수 수요량 파악 및 생산시설의 확장 계획

▸기존 시설물 및 급․배수시설의 정비계획

▸효율적인 유지관리 계획과 정비계획 변경 수립 등

◦ 용 역 비  :  1,866백만원

◦ 용 역 비  :  2009. 6. 25 ~ 2010. 6. 24(12개월)

□ 상반기 추진실적

◦ 상수도 관망도 작성	2009. 9. ~ 2010. 4.

◦ 시설확충 및 개량계획 수립	2010. 1. ~ 2010. 3.

◦ 유지관리 및 기타계획	2010. 1. ~ 2010. 5.

◦ 성과품 작성	2010. 5. ~ 2010. 6.

◦ 수도정비 기본계획 승인요청(환경부)	2010. 6. 23.

□ 하반기 추진계획

◦ 환경부 승인완료 후 수도정비 기본계획에 의거 상수도사업 계획 및 시행

6		효율적 정수시설 운영관리

○ ○	정수장 노후시설물 정비로 양질의 수돗물 생산 시설의 효율적 관리로 원가 절감과 연중 무사고 무휴 가동

□ 사 업 개 요

◦ 관리시설

▸정수장 : 2개소, 125,000㎥/일(공업용수 35,000㎥/일 포함)

▸배수지 : 6개소, 43,500㎥/일

◦ 정수 공급량 : 137,699㎥/일

▸자체공급량 75,993 / 전주권 45,220 / 공업용수 16,486

□ 상반기 추진실적

◦ 상수도 배수지 보강공사 등(11건 / 226백만원)	2010. 3. ~ 6.

◦ 전기 및 기계시설물 보수 등(15건 / 337백만원)	2010. 2. ~ 6.

□ 하반기 추진계획

◦ 정수장 시설물 유지보수(20백만원)	2010. 7. ~ 12.

◦ 정수장 여과재료 교체공사(36백만원)	2010. 9. ~ 11.

◦ 상수도 정․배수지 청소 등(33백만원)	2010. 10.

7		신뢰받는 수돗물 수질관리

○ ○	맑고 깨끗한 수돗물 생산․공급으로 수돗물에 대한 불신감 해소 시민이 만족하는 수질관리 서비스 제공으로 수돗물 신뢰도 향상

□ 사 업 개 요

◦ 먹는물의 안전성 확보  :  원․정수 및 수도꼭지에 대한 수질검사 내실화

◦ 민․관합동 수질검사  :  시민이 직접 참여하는 수질확인 검사 강화

◦ 수돗물 신뢰도 증대  :  정수장 개방 운영 및 수질검사 결과 홍보

□ 상반기 추진실적

◦ 수돗물 품질보고서 발간 배부  :  5만부

◦ 매월 정수장 및 수도꼭지 수질검사 결과 홍보  :  6회, 660개소

▸익산시 유관기관 홈페이지, 생활정보지, 내고장소식지 등

◦ 민․관합동 수질검사 실시  :  2회(시민단체, 지역주민 등)

◦ 수돗물 생산과정 견학  :  원대 한의학과 등 21회, 717명

□ 하반기 추진계획

◦ 원․정수 수질검사  :  원․정수, 급수과정, 수도꼭지 등 수질검사 강화

◦ 수질평가위원회 개최 및 수돗물에 대한 시민 의식조사 실시 : 10월~11월

▸수돗물에 대한 의견 수렴을 통해 수질관리에 적극반영

하수관리과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2010상반기 주요성과 및 반성
□	2010 주 요 업 무 계 획
□	특 수 시 책

비전 및 중점추진방향

	비 전
완벽한 하수처리로 녹색 청정 익산건설

		전 략 목 표
◦ ◦	하수처리 운영 효율 증대로 쾌적한 주거환경 제공 수질개선을 통한 삶의 질 향상으로 시민만족 행정 구현

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	정화된 하수를 이용한 방류수재이용 및 생태습지공원 조성 하수관거사업 추진으로 방류지역의 수질보전 완벽한 하수처리를 위한 과학적 하수처리시설 설치 친환경운동 전개로 시민의식 선진화

일   반   현   황

□ 기          구

					하수관리과
하수행정			하수관리			하수시설			하수운영			생활하수 (사설)

□ 정  ․  현  원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별								비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능	계약
정 원	24		1	5	8	5		5
현 원	24		1	6	10	2	1	4
증 감				1	2	△3	1	△1

□ 사  무  분  장

◦	하수행정 :	하수행정종합계획수립조정, 하수도특별회계 현금출납 및 금고감독, 입찰 및 계약, 하수도사용료․원인자부담금 부과징수, 공기업평가 결산
◦	하수관리 :	시내일원긴급하수도공사, 하수생활민원처리, 여산 하수종말처리장 주민숙원사업, 맨홀정비, 준설원관리
◦	하수시설 :	하수처리구역내시설종합계획, 하수관거임대형민간투자사업(BTL), 하수관거정비재정사업, 익산․금마처리구역하수관거정비사업, 금마하수처리장주민숙원사업, 배수설비협의(660㎡이상)
◦	하수운영 :	유천생태습지조성 및 생태하천복원사업, 하수처리방류수재이용사업, 하수슬러지처리시설 설치사업, 공공하수처리시설 악취방지사업, 공공하수처리시설 설치․개선․운영관리, 소규모공공하수처리시설운영․관리, 공단폐수중계펌프장관리
◦	생활하수 : (사설)	개인하수처리시설설치신고․준공․지도점검, 분뇨수집․운반업 허가 및 지도점검, 지하수개발이용 허가․신고․준공, 공중화장실, 배수설비협의(660㎡미만)

2010 예산집행실적

【 2010. 6. 30 현재 】                                   (단위 : 천원, %)

2010 상반기 성과 및 반성

□ 성      과

◦ 하수처리구역 오․우수 분리사업 정상 추진으로 쾌적한 생활환경 조성

▸ BTL 사업 및 재정사업 추진 정비 : 관거정비 40.9km

▸ 06 BTL 총 공정 : 75%

◦ 여산 공공하수처리장 준공으로 인근 하천 및 금강수계 수질 개선

▸ 설치규모 : 처리시설 600㎥/일, 차집관로 6.4km

◦ 자체 설계단 운영으로 하수관거사업 조기 발주 및 지역경제 활성화

▸ 관거정비 36건, 152개소 12.7km

◦ 집중호우 대비 상습 침수지역 하수도 개량공사 시행

▸ 신흥동 수도산공원 일원 침수지역 등 하수도 개량 및 준설 : 35.2km

◦ 배산공원내 공중화장실 개보수로 쾌적한 편익시설 제공

▸ 발효식 → 수세식으로 리모델링 완료하여 악취 민원 해소

◦ 하수도 생활민원 신속 처리로 주민 불편 해소

▸ 하수도 준설, 맨홀 보수, 배수로 정비 등

□ 반      성

◦ 주요사업 추진 실적 미흡

▸ 유천 생태습지 및 생태하천 복원사업 등 행정절차 지연에 따른 추진 미흡

▸ 토지 보상 등 절차 이행으로 금년 말 착공 계획

2010 주요업무계획

		‘09하수관거임대형민자사업(BTL) 익산처리구역(제2공구)하수관거정비사업 공공하수처리시설 설치사업 하수처리방류수 재이용사업 유천생태습지 및 자연형하천 복원사업 합류식하수도월류수(CSOs)처리시설 설치사업 공공하수처리장 총인처리시설 설치사업 시내일원 하수관거 정비사업 정화조 적정관리로 공공수역 수질오염 저감 하수슬러지 처리시설 설치사업

1		'09하수관거 임대형 민자사업(BTL)

○ ○	구 도심지역 정화조 폐쇄로 관리비용 절감 및 건물신축 용이 우․오수관 분리로 공공하수처리시설 운용효율 개선

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 중앙동, 평화동, 송학동, 인화동, 모현동 일원

◦ 사 업 량 : 관거정비  L= 90km,  배수설비 6,800가구

◦ 사 업 비 : 69,535백만원

◦ 사업기간 : 2009. 01 ～ 2014. 10

◦ 시행방식 : 임대형 민간투자(BTL) 방식

□ 상반기 추진실적

◦ 사업계획서 평가	2010. 01. 22

◦ 우선순위자 협상 완료	2010. 05. 31

◦ 실시협약(안) 검토 의뢰(공공투자관리센터)	2010. 06. 11

□ 하반기 추진계획

◦ 실시협약(안)에 대한 심의(민자사업심의위원회)	2010. 07

◦ 실시협약 체결 및 사업시행자 지정	2010. 07

◦ 실시계획 승인 신청(사업자)	2010. 11

◦ 공사 착공	2011. 02

2		익산처리구역(제2공구) 하수관거 정비사업

○ ○	하수처리시설 운영효율 증대 및 방류수역의 수질오염 방지 하수처리구역내 우․오수관 분리로 만경강 수계의 수질개선 도모

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 중앙동, 갈산동, 평화동, 인화동 일원

◦ 사 업 량 : 관거정비 L= 17.5㎞, 배수설비 445가구

◦ 사 업 비 : 9,812백만원(국비 6,868, 시비 2,944)

◦ 사업기간 : 2009. 01 ~ 2011. 06

◦ 시 공 자 : 호원건설(주) 이윤범

□ 상반기 추진실적

◦ 하수관거공사 시행	총공정 53%

▸ 관로매설 (실적 5.4㎞, 실적누계 9.4㎞)

□ 하반기 추진계획

◦ (2차분) 하수관거공사 완료(총공정 65%)	2010. 12

▸ 관로매설(계획 2㎞, 실적누계 11.4㎞)

3		공공하수처리시설 설치사업

○ ○	만경강 수계 환경기초시설 설치로 새만금 수질개선 농촌지역의 증가하는 생활하수 고도처리

□ 사 업 개 요

사 업 명	위 치	사 업 량	사업비 (백만원)	사업기간	비고 (공정율)
여산지구 하수종말처리장 설치사업	여산면 두여리 일원	600㎥/일 차집관로6.4㎞ 337가구	8,344	2004년~2010.05	완료
오산지구 공공하수처리시설 설치사업	오산면 오산리 일원	490㎥/일 차집관로22㎞ 427가구	7,384	2007년~2011.12	50%
왕궁특수지역 공공하수처리시설 설치사업	왕궁면 온수리, 구덕리 일원	490㎥/일 차집관로43.2㎞ 456가구	6,933	2009년~2011.12	실시 설계중

□ 상반기 추진실적

◦ 여산지구 하수관거 및 하수처리장 설치 완료	2010. 05 .24

◦ 오산지구 공공하수처리시설 설치사업(총공정48%)	하수관거 14.6㎞

□ 하반기 추진계획

◦ 오산지구 공공하수처리시설 설치사업

▸ 배수설비	2010. 07 ~ 2011. 12

▸ 처리장 내 기계설치(기자재)	2010. 07 ~ 2011. 03

◦ 왕궁특수지역 공공하수처리시설 설치사업

▸ 기본 및 실시설계용역 준공	2010. 07

▸ 마을하수처리장 설치 인가 협의(전라북도)	2010. 08

▸ 공사 착공 및 준공	2010. 09 ~ 2011. 12

4		하수처리 방류수 재이용사업

○ ○	하수처리 방류수를 재처리하여 저렴한 산업단지 공업용수 공급 수질오염 부하량 삭감을 통한 만경강 및 새만금호 수질보전

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 금강동 1091-4 익산공공하수처리시설 부지 내

◦ 사업규모

▸ 공업용수 공급 :  20,000㎥/일

▸ 재처리시설    :  UF(한외여과) + RO(역삼투막여과)

▸ 공 급 대 상   :  익산 1․2산단 전용 공업용수 사용업체(34개소)

◦ 사 업 비 : 19,646백만원(국비 13,752, 시비 5,894)

◦ 사업방식 : 민간투자제안방식(BTO)

◦ 사업기간 : 2008. 01 ～ 2012. 12(5년)

□ 상반기 추진실적

◦ 민간투자사업 의향서 접수에 따른 제안서 요구	2010. 01

◦ 민간투자사업 제안서 접수 및 자체 검토	2010. 06

◦ 민간투자사업 제안서 협의 요청(환경부)	2010. 06

□ 하반기 추진계획

◦ 민간투자사업 제안서 검토 의뢰(공공투자관리센터)	2010. 07

◦ 제3자 제안 공고	2010. 09

◦ 제안서 검토 및 평가(주무관청, 공공투자관리센터)	2010. 12

◦ 실시협약 체결, 사업시행자 지정, 실시계획 승인	2011. 05

◦ 공사착공 및 준공	2011. 07 ～ 2012. 09

5		유천생태습지 및 자연형하천 복원사업

○ ○	폐․하수의 유입으로 상실된 하천의 자생기능 및 수생태 건강성 회복 점 및 비점오염원 저감을 통한 만경강 및 새만금호 수질 보전

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 금강동 99-5외 125필지

◦ 대상하천 : 유천(각종 환경기초시설 방류수 유입하천)

◦ 사업규모 : 생태하천복원 1.3㎞ / 생태습지조성 180,400㎡ (완충녹지포함)

◦ 방류수계 : 유천(목천포천) → 만경강 → 새만금호 → 서해

◦ 사 업 비 : 28,750백만원(국비 14,201, 시비 14,549)

▸ 2010년 확보액 - 4,651백만원(실시설계 및 토지보상비)

◦ 사업기간 : 2009. 01 ～ 2012. 12(4년)

□ 상반기 추진실적

◦ 도시계획(도시계획시설)위원회 개최	2010. 05

◦ 도시관리계획(도시계획시설) 결정고시	2010. 06

◦ 토지보상계획 공고	2010. 06

□ 하반기 추진계획

◦ 토지 및 물건 보상 절차 이행	2010. 07 ~ 2010. 12

◦ 기본 및 실시설계	2010. 08 ~ 2010. 12

◦ 실시설계 완료 및 공사발주	2010. 12 ~ 2011. 02

◦ 공사추진 및 준공	2011. 03 ～ 2012. 12

6		합류식 하수도 월류수(CSOs)처리시설 설치사업

○ ○	강우시 초기오염도가 높은 하수도의 월류수 및 우수를 적정처리 초기 월류수를 처리하여 만경강 및 새만금 수질 보전

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 평화동 남양공업사뒤,  유천지구,  금마(3개소)

◦ 사 업 량 : 저류시설 V=29,000㎥

◦ 사 업 비 : 36,900백만원(국비25,830, 도비1,107, 시비9,963)

◦ 사업기간 : 2009년 ～ 2013년(5년)

□ 상반기 추진실적

◦ 사 업 추 진  협 약 체 결	2009. 08. 13

▸ 환경부, 전라북도, 익산시, 한국환경공단, 전주시, 김제시, 완주군

◦ 종합계획수립 및 타당성조사 용역	2009. 10 ~ 2010. 02

◦ 대형공사  발주방식 심의(일괄입찰)	2010. 02

◦ 기본계획 수립 및 입찰안내서 작성용역	2010. 03 ~ 2010. 07

□ 하반기 추진계획

◦ 일괄입찰공고 및 사업자 선정(한국환경공단)	2010. 08 ~ 10

◦ 공사추진 및 준공	2010. 11 ~ 2013

7		공공하수처리장 총인처리시설 설치사업

○ ○	인처리시설로 4대강의 조류발생, 부영양화 방지 등 수질개선 도모 수질오염 총량관리 삭감계획을 이행하고 금강하류의 수질 개선

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 2개소(함열공공하수처리장, 여산공공하수처리장)

◦ 시설계획 : 화학적 총인처리시설 및 여과시설 설치

◦ 시설용량 : 함열하수 6,000㎥/일,  여산하수 600㎥/일

◦ 방류수계

▸ 함열하수 : 산북천(함열천) → 금강 → 서해

▸ 여산하수 : 여산천 → 강경천 → 논산천 → 금강 → 서해

◦ 사 업 비 : 1,377백만원(국비 724, 도비 326.5, 시비 326.5)

▸ 2010년 확보액 - 551백만원(국비 311, 도비120, 시비 120)

◦ 사업기간 : 2010. 01 ~ 2011. 12(여산하수 1년, 함열하수 2년)

□ 상반기 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 발주	2010. 02

◦ 사업 추진계획 수립	2010. 04

◦ 기본 및 실시설계 완료	2010. 06

□ 하반기 추진계획

◦ 하수도시설 설치 변경 인가(전라북도)	2010. 07

◦ 공사 발주	2010. 08

◦ 공사 준공(여산하수)	2010. 12

◦ 공사 준공(함열하수)	2011. 12

8		시내일원 하수관거 정비사업

○○	하수관거 누수, 파손 등 생활민원 적기처리로 대민 신뢰도 제고 침수피해 및 안전사고 사전예방으로 시민 재산보호 및 생활환경 개선

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 시내일원(29개 읍ㆍ면ㆍ동)

◦ 사업내용

▸ 하수도 개량 및 신설	13.1㎞(∮300～∮1,200m/m)

▸ 침수지역 우수관거 정비	0.5㎞(∮1,500～∮1,650m/m)

▸ 하수도 준설 및 맨홀 단차 조정	L=30㎞ / 50개소

◦ 사 업 비	4,690백만원(시비)

◦ 사업기간	2010. 01 ～ 2010. 10

□ 상반기 추진실적

◦ 하수도 개량 및 신설(93%)	12.2㎞(∮300～∮1,200m/m)

◦ 침수지역 우수관거 정비(완료)	0.5㎞(∮1,500～∮1,650m/m)

◦ 하수도 준설 및 맨홀 단차 조정(75%)	L=22.5㎞ / 22개소

□ 하반기 추진계획

◦ 계    획

▸ 하수도 개량 및 신설	0.9㎞(∮300～∮1,200m/m)

▸ 하수도 준설 및 맨홀단차조정	L=7.5㎞ / 28개소

◦ 세부일정

▸ 조사측량 및 설계	2010. 08 ～ 09

▸ 공사 추진	2010. 09 ～ 10

9		개인하수처리시설 적정관리로 수질오염 저감

○ ○	정화조 청소율 제고를 통해 공공수역 수질오염 저감 효율적인 개인하수처리시설 관리로 쾌적한 생활환경 조성

□ 사 업 개 요

◦ 개인하수처리시설 현황	17,341개소

▸ 정화조 14,944개소, 오수처리시설 2,397개소

◦ 미신고 정화조 자진신고 및 양성화 추진	300건/년

◦ 기초생활수급자 정화조 청소 수수료 지원	666세대 10,000천원

◦ 정화조 청소율 목표	45%(전년 대비 5.4% 증가)

□ 상반기 추진실적

◦ 미신고 정화조 양성화	210건(달성율 70%)

◦ 정화조 내부청소 엽서안내	6회 7,731건, 청소이행 3,549건

◦ 기초생활수급자 청소요금 지원	27건 360천원

◦ 일일 50톤 이상 오수처리시설 지도 점검	1회 34개소

▸ 과태료 4건 4,900천원, 4개소 개선명령

◦ 청소율 제고를 위한 대민홍보 전개	홍보물 3,000매, 언론보도 등

□ 하반기 추진계획

◦ 10년이상 정화조 내부청소 미이행자 3진 아웃 적용	991개소

◦ 기초생활수급자 세대별 지원 안내 및 정화조 청소 독려(639세대)

◦ 미등록 정화조 추가 조사를 통해 양성화 지속 추진

10		하수슬러지 처리시설 설치사업

○	해양오염방지법의 폐기물 해양 배출 기준이 대폭 강화되어 2012년 하수슬러지 해양배출이 전면 금지됨에 따라 자체 육상처리 시설 시급

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 금강동 하수처리장 일원

◦ 사 업 량 : 시설용량 120㎥/일(60㎥/일 × 2계열)

◦ 사 업 비 : 19,800백만원(국비 13,860, 시비 5,940)

◦ 사업기간 : 2006. 02 ~ 2011. 12

□ 그간 추진 실적

◦ 업무 위․수탁 협약체결(환경관리공단)	2006. 02.  20

◦ 타당성조사 및 기본계획 용역 시행	2006. 08 ～ 2007. 10

◦ 중앙 투융자 심사(적정)	2008. 05. 15

◦ 총사업비 변경 완료	2008. 06. 30

(당초 : 7,153백만원  변경 : 19,800백만원)

◦ 하수슬러지 에너지화 회의 참석(환경부)	2009. 04. 17

◦ 하수슬러지 연료 수요/공급자 회의 참석(환경부)	2009. 06. 15

◦ 하수슬러지 추진실태 점검회의 참석(환경부)	2009. 10. 07

◦ 처리시설 운영 및 부산물 처리 실태 파악	2010. 01 ~ 2010. 06

□  하반기 추진계획

◦ 하수슬러지 처리시설 추진 방안 결정	2010.  07

◦ 실시설계	2010.  08 ~ 2010.  11

◦ 공사 착공 및 준공	2010.  12 ~ 2011.  12

특수시책

		온라인을 통한 계약실적증명 발급

1		온라인을 통한 계약실적증명 발급

□ 개    요

◦ 실적증명서 종류 : 3종(시설공사시공, 용역이행, 물품납품)

◦ 2009년도 익산시 발급 건수 : 1,184건(상하수도사업단 외 4개부서)

※ 기타 사업소 및 읍․면․동 자체 계약 발급분 제외

◦ 발급 처리 절차

▸ 현    행 : 시공업체 방문 신청  ⇒  발급(계약부서)

▸ 개선방안 : 시공업체 온라인신청  ⇒  발급(계약부서) ⇒ 우편 송부

□ 상반기 추진실적

◦ 시청 홈페이지 내 계약실적증명 창구 온라인 구축	2010. 01

▸ 홈페이지 게재 내용 정리 등  ⇒ 지식정보과

□ 하반기 추진계획

◦ 계약실적증명 온라인 서비스 시행 홍보	연중

▸ 일반․전문건설협회, 전기․통신협회 등 각종 협회 공문 발송

▸ 시 홈페이지,  반회보 및 시공업체 문자 발송 홍보 등

▸ 연초 1월말 ~ 2월초에 증명 발급이 집중되므로 지속적인 홍보