도시개발과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2010 성 과 및 반 성
□	2011 주 요 업 무 계 획
□	특 수 시 책

비전 및 중점추진방향

	비 전
◦ 쾌적하고 안전한 50만 도시를 만들기 위한 균형있는 익산시 개발

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	인간과 환경을 중시하는 도시균형개발 기반구축 시민이 참여하고 만족하는 지역 특성에 맞는 도시개발 황해권 중심의 물류교통 도시구축

일   반   현   황

□ 기     구

						도시개발과
도시행정			도시계획			도시개발				구도심			보 상			도시디자인

□ 정․현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별								비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능	계약
정 원	28	1	1	6	10	7	2	1
현 원	28	1	1	6	8	8	1	3
증 감					△2	1	△1	2

□ 사  무  분  장

◦ 도시행정 : 국․과․소 행정 종합기획 및 예산편성, 전문건설업 관리,                    개발행위, 시특법 관련업무

◦ 도시계획 : 도시기본계획 및 도시관리계획 수립, 도시계획 시설결정,                    도시계획지구지정, 지구단위계획 수립, 도시계획위원회 운영

◦ 도시개발 : 도시계획 도로사업 추진, 자전거도로 계획수립 및 시행                    도시개발사업 특별회계 관리, 설계심의위원회 운영 등

◦ 구 도 심 : 구도심 특화거리 조성사업, 구도심 민간 재개발사업 지원

◦ 보    상 : 국 소관사업 및 유관기관 용지매입, 토지수용 재결, 소유권                    이전 촉탁 및 상속등기, 기타 보상관련 업무전반

◦ 도시디자인 : 기본경관계획 수립, 공공디자인 가이드라인 수립

□ 국토의 용도구분

(단위 : ㎢, %)

구 분	총 면 적	고 시 면 적				비 고
		도시지역	관 리 지 역	농림지역	자연환경 보존지역
면 적	506.627	73.724	205.090	205.859	21.954
비 율	100	14.6	40.5	40.6	4.3

□ 도시지역내 용도지역

(단위 : ㎢, %)

구 분	계	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	비 고
면 적	73.724	17.035	1.781	8.562	46.346
비 율	100	23.1	2.4	11.6	62.9

□ 도시지역내 용도지구

(단위 : 천㎡)

지구명	계	미관지구		방화지구	고도지구	자연취락 지 구	문화자원 보존지구	비 고
		중심지	일 반
지구수	125	8	10	9	20	77	1
면 적	5,577	146	578	1,202	1,290	2,159	202

□ 도시계획도로

(단위 : 천㎡, %)

구 분	개설계획			개 설			미 개 설			개설율
	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적
계	1,214	420	6,801	800	320	5,202	414	100	1,599	76.8
광로	5	13	806	3	12	665	2	1	141	82.5
대로	54	84	2402	36	75	1948	18	9	454	81.0
중로	220	123	1980	138	94	1464	82	29	516	73.9
소로	935	200	1613	623	139	1125	312	61	488	69.7

□ 장기미집행 도시계획시설 현황

(단위 : 백만원)

시설명	시설수	면적(㎡)	총사업비	공사비	보상비
계	482	6,215,428	606,819	224,803	382,016
도 로	414	1,599,238	333,169	149,115	184,054
공 원	31	4,027,801	231,606	62,532	169,074
녹 지	28	511,204	23,351	5,441	17,910
광 장	8	43,338	11,248	4,331	6,917
운 동 장	1	33,847	7,445	3,384	4,061

□ 전문건설업 현황

◦ 업 체 별 :  327개업체(일반전문 436, 가스 58, 난방 33)

◦ 업 종 별                                          (단위 : 개소)

계	일 반 전 문								가스	난방
	소계	철콘	상하	토공	금속 (철물,창호)	석공	포장	기타
527	436	100	90	44	36	22	13	131	58	33

□ 도시계획위원회

( 단위 : 명 )

분 야	계	시 청	의 회	교 수	건축사	단 체	기 타
인 원	18	3	2	9	1	2	1

◦ 교  수 :  9명 (전북대 1, 원광대 6, 우석대 1, 백제예대 1)

◦ 단  체 :  2명 (대한어머니회장, 한국부인회장)

◦ 기  타 :  1명 (퇴직 공무원)

2010 주요성과 및 반성

□ 성      과

◦ 보행자 중심의 하나로 상징거리 조성으로 시민 휴식공간 제공

▸보도정비 : L = 1,391m․B = 9m

- 자전거 도로, 볼라드, 점자블럭, 화단설치 등

▸자연친화적 휴식공간 조성

- 실개천, 벤치, 파라솔, 석등, 돌조각품 등

※ 도심 가로환경 선진지 견학 : 전주, 군산, 정읍 등

◦ 인북2로 ~ 마한로 조기개통으로 무왕로 교통난 완화

▸1.3㎞ 우회통행 불편 및 제방도로 사고위험 해소

◦ 팔봉초교 인도육교에 승강기 등 교통약자 보호시설 설치로 사고위험 해소

▸LED 야간경관조명, 소공원조성 등으로 시 진입부 새로운 명소로 변신

◦ 2011년도 안전한 보행환경 개선사업 (선화로)

▸행정안전부 국비 15억 추가확보

□ 반      성

◦ 공공시설 건설시 장애물을 고려치 않은 설계로 교통약자 통행불편 초래

▸장애물 없는 생활환경 개선을 위한 인식전환 필요

※ 횡단보도, 볼라드, 전신주, 간판, 가로등, 신호등, 주차장, 화장실 등

2011 주요업무계획

		도시관리계획(재정비)수립 ‘11 도시계획도로 개설사업 산업도로(대로1-2호) 확장공사 함열 소도읍 육성사업 선화로 안전한 보행환경 조성사업 황등중로(2차) 도로개설사업 탑천~미륵사지간 자전거도로 개설공사 아름다운 금강변 포구마을 가꾸기사업

1		도시관리계획(재정비) 수립

○	2025년 도시기본계획의 하위계획으로 도시의 개발․정비․보전 등에 대하여 도시공간의 구체적인 토지이용계획 수립(10년 계획)

□ 사 업 개 요

◦ 대상지역 : 행정구역 506.63㎢

◦ 사업내용 : 토지이용계획, 미관 및 고도지구 계획, 도시기반시설계획 등

◦ 도시관리계획(안) 작성

▸용도지역․지구, 도시기반시설(도로, 철도, 공원 등) 계획

▸주거지역 종세분, 도시계획 민원사항 검토 등

□ 추 진 계 획

◦ 시 도시계획위원회 자문 및 심의               :  2011. 1. ~ 2.

◦ 전라북도 결정신청                            :  2011. 2.

◦ 전북도 지방도시계획위원회 심의 및 결정고시   : 2011. 2. ~ 3.

□ 기 대 효 과

◦ 장래 개발여건 변화를 사전에 예측하고 대응하기 위한 도로, 공원 등 도시기반시설 및 토지이용계획 등 재정비를 통해 여성친화도시   공간정책 수립을 위한 기틀마련

2		‘11 도시계획도로 개설사업

○ ○	시가지 간선도로 및 도시계획도로 개설로 시민편익 증진 기여 교통체증 해소 및 지역간 균형발전을 통한 지역개발 촉진

□ 사 업 개 요

◦ 사업개요 : 도시계획 도로개설  17개노선 L=21.12km

◦ 사 업 비 : 17개노선 13,888백만원(국비 3,068․도비 2,033․시비 8,787)

▸계속사업 - 15개노선 13,853백만원(국비 3,068․도비 2,033․시비 8,752)

▪교부세사업 -  1개노선 3,877백만원(시비)

▪자체사업 - 14개노선 9,976백만원(국비 3,068․도비 2,033․시비 4,875)

▸2010 신규사업 : 2개노선 35백만원(시비)

※ 예산 미확보사업 : 18개노선 L=14.82km  30,396백만원

□  추 진 계 획

(단위: 백만원)

구 분		합 계	추 진 계 획			비 고
			설 계	보 상	공 사
합 계		17개노선 (13,888)	1 (127)	5 (1,170)	11 (12,591)
계속사업	소 계	15개노선 (13,853)	1 (127)	5 (1,170)	9 (12,556)
	교 부 세 사 업	1 (3,877)			1 (3,877)
	자체사업	14 (9,976)	1 (127)	5 (1,170)	8 (8,679)
2010 신규사업		2 (35)			2 (35)

1. 계 속 사 업 (이월)                                   (단위: 백만원)

사 업 명		사업개요	사업기간	소 요 사 업 비					공 정 (%)
				총 사업비	기투자	2011 예산액		금 후
						이월액	본예산
합 계		15개노선 L=21.12㎞		67,042	31,907	7,038	6,815	21,282
교부세	산업도로(3공구) 확장공사	L=3,700m B=50m	2006. 01.~ 2013. 12.	23,538	14,709	계속비 3,077	800	4,952	완료:1.3km 시공:2.4km 공정:10%
자체사업	소 계	14개노선 L=17.42㎞		43,504	17,198	3,961	6,015	16,330
	목천동원주ⓐ~우석장례식장간 도로개설	L=670m B=35m	2009. 01.~ 2012. 12.	4,900	520		1,000	3,380	보상 6%
	지방도720~팔봉중왕 마을간도로개설	L=2,200m B=15m	2003. 03.~ 2011. 12.	4,500	3,814	계속비 56	630		공사 70%
	황등중로(2차) 도로개설	L=1,200m B=15m	2004. 03~ 2012. 12.	6,050	2,294	명시 456	800	2,500	발주
	함열보건소~중학교간 도로개설	L=580m B=6~8m	2005. 08.~ 2011. 12.	1,600	1,448	명시 27	125		공사 85%
	송학동사무소 옆 도로개설	L=260m B=8m	2008. 01.~ 2011. 12.	400	296	명시 4	100		공사 10%
	함열소도읍 육성사업	3개사업	2008. 01.~ 2011. 12.	13,000	4,791	계속비 1,909	3,360	2,940	공사 70%
	석방육교~도축장간 도로개설	L=780m B=15m	2008. 01.~ 2012. 12.	3,400	670	명시 30		2,700	공사 5%
	어양동부천초교 옆 도로개설	L=140m B=6m	2008. 01.~ 2011. 12.	900	217	명시 83		600	보상 64%
	금마시장 뒤 도로개설	L=100m B=10m	2009. 01.~ 2011. 12.	500	249	명시 51		200	보상 83%
	전북기계공고 뒤 도로개설	L=400m B=8m	2004. 03.~ 2012. 12.	1,400	651	명시 127		622	설계 50%
	전북기계공고 옆 도로개설	L=260m B=15m	2010. 01.~ 2012. 12.	1,900	41	명시 31		1,828	보상 1%
	탑천~미륵사지간 자전거도로개설	L=9,800m B=3m	2010. 01.~ 2011. 12.	1,053		명시 1,053			발주
	함열미력리 (소로1-8호선)도로개설	L=450m B=10m	2009. 12.~ 2012. 12.	2,000	435	사고 5		1,560	보상 67%
	학곤선 도로개설	L=576m B=8m	2003. 03.~ 2011. 12.	1,901	1,772	사고 129			가로등 휀스

2. 2010 신규사업 (본예산)                              (단위: 백만원)

사 업 명		사업개요	사업기간	소 요 사 업 비					공 정 (%)
				총 사업비	기투자	2011 예산액		금 후
						이월액	본예산
합 계		2개노선 L=80m		35	-	-	35
주민숙원	금마한울아파트 앞 도로포장	L=30m B=8m	2011. 01.~ 2011. 12.	10	-	-	10
	부평선 도로개설 민원처리사항	L=50m B=3m	2011. 01.~ 2011. 12.	25	-	-	25

3. 2010 예산 미확보 사업                              (단위: 백만원)

사 업 명		사업개요	사업기간	소 요 사 업 비					공 정 (%)
				총 사업비	기투자	2011 예산액		금 후
						이월액	본예산
합 계		18개노선 L=14.82㎞		84,479	54,055	28		30,396
교부세사업	도․농 연결도로개설	L=10,827m B=50m	1997. 01.~ 2013. 12.	68,110	48,176	계속비 28		19,906	완료:7.0km 설계:1.0km 잔여:2.8km 보상:12%
자체사업	소 계	17개노선 L=3.99㎞		16,369	5,879			10,490
	황등역 진입로 (중로3-2호) 도로개설	L=150m B=15m	2009. 01.~ 2011. 12.	600	200			400	보상 100%
	함열읍소로3-10호 도로개설	L=104m B=6m	2009. 01.~ 2011. 12.	370	100			270	보상 100%
	모현동18통 도로개설	L=130m B=6m	2005. 01.~ 2011. 12.	650	400			250	보상 98%
	구,익산군청앞 도로개설	L=218m B=10m	2008. 01.~ 2011. 12.	1,000	300			700	보상 97%
	학곤선(소로3-66호)도로개설	L=83m B=6m	2010. 02.~ 2011. 12.	329	199			130	보상 70%

사 업 명		사업개요	사업기간	소 요 사 업 비					공 정 (%)
				총 사업비	기투자	2011 예산액		금 후
						이월액	본예산
자체사업	송학동망기마을 진입도로개설	L=420m B=8m	2003. 03.~ 2012. 12.	1,700	600			1,100	보상 83%
	구,모현동사무소 옆 도로개설	L=560m B=8m	2004. 03.~ 2011. 12.	1,700	780			920	보상 82%
	주현동천일유치원 앞 도로개설	L=80m B=8m	2010. 01.~ 2012. 12.	800	200			600	보상 70%
	함열천주교 옆 도로개설	L=380m B=8m	2004. 05~ 2011. 12.	800	300			500	보상 57%
	영등동 보람주유소~은혜교회 옆 도로개설	L=166m B=8-10m	2005. 02.~ 2012. 12.	800	200			600	보상 56%
	팔봉부송근린공원 (중로2-28호) 진입도로개설	L=250m B=15m	2010. 01.~ 2012. 12.	670	150			520	보상 44%
	영등동 청아아파트 옆외 3개소 도로개설	L=600m B=6-10m	2005. 03.~ 2012. 12.	2,100	450			1,650	보상 41%
	영등동 동부상설시장 뒤외 2개소 도로개설	L=218m B=6-8m	2005. 03.~ 2012. 12.	950	450			500	보상 36%
	함열동지산 진입도로개설	L=160m B=6m	2006. 01.~ 2011. 12.	750	150			600	보상 36%
	인화스파리스- 제이파크간 도로개설	L=180m B=12m	2008. 01.~ 2011. 12.	1,400	850			550	보상 35%
	모현동소로3-49호 도로개설	L=100m B=6m	2009. 01.~ 2011. 12.	800	300			500	보상 35%
	함열농협 옆 도로개설	L=190m B=6m	2008. 07.~ 2011. 12.	950	250			700	보상 19%

□ 기 대 효 과

◦ 주요간선도로 및 도시계획도로 개설로 시민편익 증진 기여

◦ 장기 미집행 도로개설로 지역균형발전 및 교통체증 해소

3		산업도로(대로1-2호) 확장공사

□ 사 업 개 요

◦ 위      치 : 공설운동장 ~ 덕기동 현대주유소

◦ 사  업  량 : L=3,761m , B=20 ⇒ 35m

▸ 1 구 간 - L=1,245m(공설운동장 ~ 팔봉자동차 - 인도육교 L=31m, B=3m)

▸ 2 구 간 - L=2,516m(팔봉자동차 ~ 금마면계)

◦ 사업 기간 : 2006.  3.  ~  2013. 12.

◦ 사  업  비 : 23,538백만원 (공사비 14,638 , 보상비 8,900  ’11년 800)

□ 추 진 계 획

◦ 2구간(1차분) 도로확장공사 시행 및 완료 (L=660m) :  2011.   1. ~  8.

◦ 2구간(2차분) 도로확장공사 착공 및 시행        :  2011.   9. ~ 12.

※ 2011년도 예산범위 내에서 년차적으로 확장공사 시행

□ 기 대 효 과

◦ 익산 IC까지 도로확장으로 물류비 절감 및 교통흐름 원활 도모

◦ 도시계획도로 확장에 따른 지역균형 개발촉진 및 교통난 해소

4		함열소도읍 육성산업

○ ○	석재를 이용한 지역특화사업으로 정주여건 확충 기여 북부권 농촌지역 중심거점으로 육성 및 낙후지역 균형발전 도모

□ 사 업 개 요

◦ 대상지역 : 함열읍 와리, 남당리

◦ 사업내용 : 석재산업 활성화, 상점가로 환경정비, 실버보건 환경개선

◦ 사 업 비  : 13,000백만원 (국비 5,000, 도비 2,500, 시비 5,500 - ’11년 3,360)

◦ 사업기간 : 2008. 3. ~ 2011. 12.

□ 추 진 계 획

◦ 돌숲공원 (돌조각) 조성계획 실시계획인가 및 용역완료 : 2011. 1. ~  3.

◦ 가로환경 정비사업, 석재산업 활성화 경관녹지조성 준공 : 2011. 1. ~   6.

◦ 실버보건 환경개선사업 추진 (보건소 협조)          : 2011. 1. ~ 12.

□ 기 대 효 과

◦ 석재를 이용한 지역특화사업으로 읍소재지의 정주여건 확충 기여

◦ 여성친화적 도로설계로 여성감성도시 조성

5		선화로 안전한 보행환경 조성사업

○ ○	도심지내 보행자를 위한 보도시설이 연계되지 않아 교통사고 발생 우려로 안전한 보행공간 확보 필요 저탄소 녹색도시 건설을 위한 보도 및 자전거도로 설치로 안전한 보행환경 조성

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 중앙체육공원 ~ 원팔봉 삼거리

◦ 사 업 량 :  L=2,3km, B=20 ⇒ 35m

◦ 사업기간 : 2010. 1. ~ 2012. 12.

◦ 사 업 비 : 12,573백만원 (공사비 74억, 보상비 52억 - ‘11년 30억)

□ 추 진 계 획

◦ 용지보상 및 토지수용 재결            :       2011.  1. ~   6.

▸ 5 필지 / 432 ㎡

◦ 중앙체육공원 ~ 2공단사거리 공사시행  :       2011.  3. ~  12.

□ 기 대 효 과

◦ 미개설된 인도 및 자전거도로 개설로 교통약자 보행환경 개선

◦ 완주, 익산, 군산 산업단지간 물동량 수송원활 도모

6		황등중로(2차) 도로개설사업

□ 사 업 개 요

◦ 위      치 : 황등역  ~  신정마을

◦ 사  업  량 : L=1.2km, B=15m

◦ 사업 기간 : 2004. 3. ~ 2012.

◦ 사  업  비 : 6,050백만원 (공사비 3,550, 보상비 2,500 - ‘11년 800)

□ 추 진 계 획

◦ 용지보상 및 토지수용 재결              :       2011.  1. ~  6.

▸ 7필지 / 2,098㎡, 지장물 2건

◦ 단계별 공사착공 및 시행                :       2011.  3. ~ 2012.

□ 기 대 효 과

◦ 도시계획도로 개설로 주거환경 개선 및 교통불편 해소

◦ 여성친화적 도로설계로 시민 모두가 행복한 도시조성

7		탑천~미륵사지간 자전거도로 개설공사

□ 사 업 개 요

◦ 위      치 :  원대 수목원 ~ 금마 미륵사지

◦ 사업내용 :  L= 9.8㎞,   B= 3m

◦ 사업기간 :  2010. 1. ~ 2011. 10.

◦ 사 업 비  :  1,057백만원 (2010년 분권교부세)

□ 추 진 계 획

◦ 공사시행 및 완료                :     2011.  3.  ~  10.

◦ 강변 관광 순환형 자전거 네트워크 구축 (중기계획 72km)

▸ 탑천 - 미륵사지 - 산북천 - 성당포구 - 만경강(목천포천) - 익산천 - 미륵사지

□ 기 대 효 과

◦ 탑천의 수변공간과 자전거도로 조성으로 저탄소 녹색성장 도시육성

8		아름다운 금강변 포구마을 가꾸기 사업

○ ○	공공디자인을 통한 생활환경 개선으로 아름답고 쾌적한 마을환경 조성 역사․문화자원 복원과 농촌의 녹색․생태관광자원 발굴로 지역경제 활성화

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 성당면 성당리 성당포구마을 일원

◦ 사업내용

▸ 도로공사 - 소달구지길, 진입부 광장

▸ 건축공사 - 도․농 교류관, 마을회관 리모델링

▸ 조경공사 - 만남의 터, 산책로, 선착장 등

◦ 사업기간 : 2009. ~ 2012.

◦ 사 업 비 : 4,700백만원(국비 2,175, 지방비 2,525)

□ 추 진 계 획

◦ 실시설계 용역 추진 ------------------------------------ 2010.  9. ~ 2011. 1.

◦ 1단계(도시계획시설 사업) 추진 --------------------- 2010. 12. ~ 2011. 7.

◦ 2단계(건축사업 및 일부 토목공사) 추진 --------- 2011. 3. ~ 12.

◦ 3단계 사업(잔여토목 및 조경공사) ----------------- 2012. 1. ~ 12.

□ 기 대 효 과

◦ 낙후된 농촌마을의 환경개선과 농촌의 녹색･생태공간 활용으로 새로운 관광자원 발굴

◦ 도시와 농촌의 교류 촉진으로 지역경제 활성화 도모

특수시책

		중앙로 문화예술의 거리 조성

1		중앙로 특화거리(문화예술의거리)조성

□ 사 업 개 요

◦ 위      치 : 중앙동 원도심지역 (8개구간, L=2,502m)

◦ 사  업  비 : 5,865백만원(기투자 1,823, 금후 4,042 - 2007 ~ 2012)

◦ 2011년 사업계획 : 중앙로 특화거리 조성 (기반시설 정비)

▸ 위    치 : 중앙로 황해사 ~ 구) 무랑루즈간

▸ 규    모 : L=310m, B=8m (접속도로 6개소 L=580m, B=6m)

▸ 사 업 비 : 1,988백만원 (공사비 1,088  지중화 900  한전부담금 별도)

▸ 사업내용 : 특화거리 조성에 따른 하수관거, 지중화 등

기반시설 정비 및 휴식공간 설치

※ 문화예술의 거리조성과 병행 추진(문화관광과,도시개발과,여성친화정책과)

□ 추 진 계 획

◦ 특화거리 기반시설 공사관련 유관기관 협의        : 2011. 1. ~  2.

▸지중화(전기․통신 기관, 상․하수도 등) 시설 및 교통체계 등

◦ 특화거리조성 기반시설공사 추진                  : 2011. 3. ~ 10.

※ 문화예술의 거리조성 (문화관광과 등 관련부서 협의 추진)

◦ 문화예술거리 조성 기본계획(안) 보고              : 2011. 1. ~  2.

▸ 행정절차 이행 후 소요예산 확보 추진

▸ 추진협의회 구성 운영 (대상자 선정 및 지도 관리)

◦ 문화예술단체, 시민단체, 지역주민 협의            : 2011. 2. ~  4.

◦ 문화예술의 거리조성 및 운영                     : 2011. 하반기

□ 기 대 효 과

◦ KTX익산역, 복합환승센터, 평화지구와 연계한 원도심 인구유입기반 구축

◦ 문화재단과 연계한 문화예술거리 조성으로 원도심 활성화 기여