2011.  7.

제154회 익산시의회(제1차 정례회)

2011행정사무감사자료

상하수도사업단

순     서

□	상 수 관 리 과	………	3
□	하 수 관 리 과	………	55

상 수 관 리 과

	□		감사자료 과 공통사항
				1.	2010 업무성과 및 반성 …………………………	7
				2.	2010 예산집행 및 추진사항 ………………	8
				3.	2010 행정사무감사시 지적사항에 대한 조치 결과 …	10
				4.	2010 상급기관 감사시 지적사항 및 조치 결과 …	13
				5.	시정질문에 대한 조치결과 ……………………	14
				6.	주요사업 조서(3천만원 이상) ………………	15
				7.	2010년 각종 민원(진정.건의.청원 등) 접수 처리내역 …	18
				8.	기금 운용 관련 …………………………………	18
				9.	위원회(자문위원회 포함) 운영 관련 …………	19
				10.	용역사업 관련 …………………………………	20
				11.	각종 민간사회단체 보조금지원 관련 …………	21
				12.	인․허가 민원관련 ………………………………	21
				13.	각종공사 설계 변경상황 ………………………	22
				14.	건설공사 집행 현황(3천만원 이상) …………	24
				15.	민간에 대한 보조금 집행 내역 ………………	27
				16.	국․도비 보조사업 집행현황(1억원 이상) …	27
				17.	명시 및 사고이월사업비 집행 내역 …………	28
				18.	예산전용 사항 및 예비비 집행 현황 …………	29
				19	공사 준공기한 연장 내역 ………………………	29
				20.	국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황	30
				21.	국․도비 반납 현황(항목별 반납사유 명시) …	30
				22.	2010년도 계획사업중 미착공사업 현황 ………	31
				23.	2010년도 계획사업중 유보 및 취소된 사업현황…	31
				24.	2010년도 이월사업중 유보 및 취소된 사업 …	32
				25.	2010년도 예산편성후 전액 미집행 내역 ……	32
				26.	소송 사건 현황 …………………………………	33
				27.	시홈페이지에서 접수된 민원처리 현황 ………	34

상 수 관 리 과

	□		감사자료 과 요구사항
				1.	상수도 공기업 운영사항 ………………	43
				2.	상수도요금부과징수 및 체납액 현황 ………… ▸20위까지 과세물건 표시	44
				3.	상수도사업 채무 및 상환계획(상환조건, 기간 등) ……	46
				4.	유수율 증대를 위한 누수방지사업 추진사항 ……	47
				5.	상수도 수질관련 민원(적수발생 포함) 및 처리결과 …	48
				6.	상수도검침(요금부과 포함)에 대한 민원 및 처리결과 …	49
				7.	상수도 수압관련 민원 및 처리결과 내역 ………	51
				8.	500만원이상 약품 및 물품구입 현황 및 계약현황 … 〔일자/공사(물품)명/예정가/낙찰가/낙찰자〕	52
				9.	상수도 사업관련 각종용역 추진사항 ………	53

감사자료 과 공통사항

1. 2010 업무성과 및 반성

확인자	:	상수관리과장		안 재 억	ꄫ
작성자	:	상수행정담당		국 승 원	ꄫ
작성자	:	정수생산담당		석 금 산	ꄫ
작성자	:	급수시설담당		전 종 배	ꄫ
작성자	:	요금담당		변 명 숙	ꄫ
작성자	:	누수방지담당		윤 서 용	ꄫ
작성자	:	수질실험담당		문 대 은	ꄫ

□ 성      과

◦ 2010년 지방공기업 경영평가 결과 “우수”

▸익산시 상수도 “행안부장관상 수상”

◦ 농촌마을 상수도 급수구역 확장으로 주민편익 증진

▸ 36개마을 / 48.0㎞ / 3,017백만원(국 1,400  시 1,617)

◦ 급수불량지역 민원해소	마동 2청사 부근 등 2,884세대 혜택

◦ 유수율 증대를 위한 누수방지사업	1,340백만원

▸  노후관 교체 및 수질개선공사  :  5.2km

▸  누수처 긴급보수공사  :  809개소

▸  변류 및 상수도 표시못 정비공사  :  200여 개소

▸ 옥내 누수탐사  :  657건

◦ 상수도 사용료 부과징수

▸ 부과액  :  24,548백만원    ▸ 징수액  :  24,181백만원(98.5%)

◦ 시민이 참여하는 수돗물 수질검사로 신뢰도 증대

▸ 민․관합동 수질검사  :  4회

▸ 수돗물 생산과정 견학  :  50회 1,745명

□ 반      성

◦ 상수도 요금 현실화율 저조

▸ 시민부담 최소화, 점진적 인상 추진

2. 2010 예산 집행 및 추진사항

확인자	:	상 수 관 리 과 장		안 재 억	ꄫ
작성자	:	상수행정담당		국 승 원	ꄫ
작성자	:	요금담당		변 명 숙	ꄫ

□ 세      입

(2010. 12. 31. 현재)                                              (단위 : 백만원)

과 목			예 산 액	세 입 액	비 율	비 고
합 계			28,199	31,513	111.8
1. 상 수 도 사 업 수 입			24,717	25,991	105.2
	영 업 수 익	소 계	24,412	25,704	105.3
		급 수 수 익	22,829	24,181	105.9
		급수공사수익	1,346	1,303	96.8
		기타영업수익	237	220	92.8
	영업외 수 익	소 계	305	287	94.1
		이자수익	170	37	21.8
		타회계부담금수익	95	148	155.8
		기타 영업외수익	40	102	255.0
2. 자 본 적 수 입			3,482	5,522	158.6
	자본적 수 입	소 계	1,732	1,967	113.6
		고정자산매각수입	0	0
		시설분담금	232	467	201.3
		타 회계 건설보조금	1,500	1,500	100.0
	기 타 자 본 적 수입		1,750	3,555	203.1

□ 세      출

(2010. 12. 31. 현재)                                             (단위 : 백만원)

과 목		예 산 액	집 행 액	잔 액	비 율	비 고
총 계		28,199	25,647	2,552	91.0
영업비용	소계	19,282	17,891	1,391	92.8
	원수 및 취수비	9,958	9,838	120	98.8
	정수비	1,597	1,527	70	95.6
	급수비	246	211	35	85.8
	일 반 관 리 비	4,623	3,961	662	85.7
	징수및수용가관리비	1,510	1,186	324	78.5
	급 수 공 사 비	1,348	1,168	180	86.6
영업외비용	지급이자	128	124	4	96.9
예 비 비	예비비	450	0	450	0.0
가동설비 자 산	소계	7,467	7,060	407	94.5
	토지,건물	29	28	1	96.6
	구축물	5,974	5,816	158	97.4
	기계장치	1,330	1,088	242	81.8
	차량운반구	91	91	0	100.0
	공기구비품	43	37	6	86.0
고정부채 상 환	소계	572	572	0	100.0
	지역개발기금	350	350	0	100.0
	정부차입금	213	213	0	100.0
	고 정 부 채 등	9	9	0	100.0
예 비 비	예비비	300	0	300	0.0

3. 2010 행정사무감사시 지적사항에 대한 조치결과

확인자	:	상수관리과장		안 재 억	ꄫ
작성자	:	상수행정담당		국 승 원	ꄫ
작성자	:	정수생산담당		석 금 산	ꄫ
작성자	:	급수시설담당		전 종 배	ꄫ
작성자	:	요금담당		변 명 숙	ꄫ
작성자	:	누수방지담당		윤 서 용	ꄫ
작성자	:	수질실험담당		문 대 은	ꄫ

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과	비고
1	• 최근 수도 검침관련 민원이 야기되고 있는데 추후 2년 단위로 계약하는 수도검침 기간제 근무자 결원시 보다 섬세한 여성을 채용하는 방안을 검토하기 바람.	• 현재 기간제 검침원 채용인원29명 중 19명이 여성으로 앞으로도 결원 시 채용을 검토하겠음
2	• 수도물 도수는 과학적으로 예측 가능하므로 도수 우려가 있는 목욕탕, 사우나, 헬스장 등 과다 사용하는 업체에 대하여 도수예방을 위해 관리감독을 철저히 하여 시민의 혈세가 낭비되지 않도록 하기 바람.	• 물을 다량으로 사용하는 업체의 경우 현재 점검계획을 세워 점검하고 있으며 추후 관리감독을 철저히 하여 수돗물도수가 발생되지 않도록 하겠음
3	• 상수도 공사시 계약대로 시공되는지 철저히 관리감독을 해야 할 것이며 공사 후 노면상태가 고르지 못하여 통행에 불편을 초래하므로 도로에 대한 사후관리도 철저히 하기 바람.	• 상수도 공사시 시민감독관 및 통리장등으로 명예감독관 위촉 철저한 감독을 위해 노력하고 있으며 굴착 후 원상복구도 견고히 시공토록 하겠음

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과	비고
4	•신흥정수장, 금강정수장 등 상수원 지역에 대한 취약시간대 관리를 철저히 하여 시민들이 안심하고 마실 수 있는 맑은 물 공급에 만전을 기하기 바람.	• 현재 청원경찰 2명, 상황실근무자 2명이 상시근무하고 있으며, CCTV를 신흥10개소, 금강11개소, 금마5개소에 설치 실시간 감시하고 있음.
5	• 상수도 급수시설을 해놓고 개인세대에서 급수 시설을 이용하지 않고 지하수 사용을 하는 세대가 많은데 앞으로는 세대별 수요량을 파악하여 급수시설 공사를 하여 예산이 낭비되는 일이 없도록 하기 바람.	• 노령화 사회로 시골에 노인분들이 비용이 많이 들어 개인급수공사를 하지 않고 지하수를 사용하는 분들이 많은 것이 사실이며 배수관부설공사시 개인급수공사를 신청하여 상수도를 사용하도록 홍보하겠음
6	• 상수도민원으로 적수, 수압관련, 검침관련 등 많은 민원이 발생하고 있는데 앞으로 동일한 민원이 발생치 않도록 상수도행정 추진에 최선을 다하여 시민불편 해소에 만전을 기하기 바람.	• 수압문제는 현재 남중동, 마동가압장 설치공사 시행 완료하였으며 하반기 동부시장 부근 가압시설 계획중으로 완료되면 시내지역 수압은 어느 정도 해결 될 것이며, 적수는 광역상수도와 자체생산부분을 잘 조정해 현재는 적수발생 되는 곳이 없으며 앞으로는 5월경부터 관말부분의 소화전에서 미리 배출 적수발생을 최소화하여 시민불편이 없도록 노력하겠음
7	• 상수도 사용료 체납액이 2009년473백만원으로 많아지고 있는데 체납사유를 체납유형별로 분석하고 체납자에 대하여는 단수, 압류조치 등 채권확보를 철저히 해주시고 징수불능분에 대하여는 지방세법을 준용하여 과감한 결손처분 등으로 체납액 일소에 만전을 기하기 바람.	•오래된 체납액은 계속적인 독려를 통해 징수하고 있으며 최근체납액도 지속적으로 징수대책을 세워 체납액을 줄여나가겠음.

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과	비고
8	• AI급수지역에 대하여 1,345백만원을 투입하여 개인급수공사를 실시했는데 공사시 관을 제대로 묻지 않고 부설하는 등 많은 문제점이 있었는데 앞으로는 부실공사가 재발되지 않도록 급수공사시 준공검사 등 지도감독을 철저히 하기 바람.	• AI공사관련 갑자기 국비가 많이 내려와 직원들이 한꺼번에 많은 사업장을 감독하다 보니 사고가 있어 시민감독관 및 통리장등으로 명예감독관 위촉 철저한 감독을 위해 노력하고 있으며 굴착 후 원상복구도 견고히 시공토록 하겠음
9	• 상수도 보급에 있어서 유수율 증대도 중요하지만 무수율이 8,683천톤으로 17.93%로 너무 많아 상수도 급수수익에 차질이 우려되는 바 무수량을 사유별로 정확하게 데이터 분석하여 계량기 불감, 공공수량 사용 등으로 인한 무수량을 줄일 수 있는 대책을 강구하기 바람.	• 무수량은 소방용수 등 공공용 및 적수발생시 소화전 배출량 등으로 현재 부과하지 않고 있으나 공공용수에 대한 요금 부과방법 등 무수량을 줄일 수 있는 방안을 강구하고 연차적으로 적수발생 요인을 최소화 할 수 있는 노후수도관 교체, 노후 수도계량기 교체등 유수율 제고사업을 적극 추진하겠음
10	• 익산시 전지역이 적수발생으로 문제가 많았던바 내년엔 적수가 발생치 않도록 관말지역 등을 미리 점검 조치하여 적수발생으로 인한 무수량 처리되지 않도록 하기 바람.	• 적수발생이 되지 않도록 5월부터 관말지역의 소화전에서 출수작업시행 적수가 발생되지 않도록 미연에 방지하겠음.

4. 2010년 상급기관 감사시 지적사항 및 조치결과

확인자	:	상수관리과장		안 재 억	ꄫ
작성자	:	상수행정담당		국 승 원	ꄫ
작성자	:	정수생산담당		석 금 산	ꄫ
작성자	:	급수시설담당		전 종 배	ꄫ
작성자	:	요금담당		변 명 숙	ꄫ
작성자	:	누수방지담당		윤 서 용	ꄫ

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과	비고
1	• 저수조 위생관리 의무위반자에 대한 조치소홀	• 저수조 청소 및 수질검사 일제점검 추진계획을 수립 관련규정에 따라 주기적인 지도․점검을 실시하겠음	도종합감사
2	• 정수시설운영관리사 자격 소지자 미배치	• 정수시설운영관리사 자격 소지자 배치 요청(2009. 7.24) - 정수시설운영관리사 배치기준을 충족토록 자체 자격증 취득 · 자격증 취득 : 4명 (1급 1, 2급 1, 3급 2) · 1차합격자 : 3명 - 지속적으로 자체인력 취득 노력	도종합감사
3	• 상수도요금 부과업무 부적정	• 급수전 인계, 인수를 철저히 하여 정확한 검침을 실시하도록 하겠으며, 미 부과된 수용가에 대하여는 즉시 요금부과를 하였음(2010.11) -급수공사관련서류를 신속히 인계하여 검침 및 부과를 지연하는 사례가 없도록 하겠음	도종합감사

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과	비고
4	• 관급자재(물품) 분할구매로 예산집행 소홀	• 다수공급자계약 물품 구매 시 조달청 다수공급자 계약물품 처리 규정에 맞게 처리하여 예산을 절약할 수 있도록 하겠음	도종합감사
5	• 상수도 유수율 관리 부적정	• 상수도 유수율 관리를 위하여 연차별 유수율 제고 종합계획을 수립하였으며 향후 체계적이고 효율적으로 유수율 제고사업을 추진하겠음	도종합감사
6	• 새올행정시스템 활용도 저조	• 새올 행정시스템에서 제공하고 있는 상수도요금 프로그램이 우리시에서 사용하고 있는 프로그램으로 전환가능 할 경우 추진하겠음	도종합감사

5. 시정질문에 대한 조치결과

확인자	:	상수관리과장		안 재 억	ꄫ
작성자	:	상수행정담당		국 승 원	ꄫ
작성자	:	정수생산담당		석 금 산	ꄫ
작성자	:	급수시설담당		전 종 배	ꄫ
작성자	:	요금담당		변 명 숙	ꄫ
작성자	:	누수방지담당		윤 서 용	ꄫ
작성자	:	수질실험담당		문 대 은	ꄫ

해  당   없  음

6. 주요사업 조서(3천만원 이상)

확인자	:	상수관리과장		안 재 억	ꄫ
작성자	:	정수생산담당		석 금 산	ꄫ
작성자	:	급수시설담당		전 종 배	ꄫ
작성자	:	누수방지담당		윤 서 용	ꄫ

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요	공사기간	총사업비	시공회사	공정(%)
계	48건		2,821
농어촌생활용수개발사업 (왕궁면 중리마을)	L=1,392m (∮25~75mm)	10.02.23～ 10.05.26	45	(유)동원건설	100
농어촌생활용수개발사업 (왕궁면 갈전마을)	L=1,622m (∮25~75mm)	10.03.03～ 10.05.26	44	(유)장성건설	100
신흥정수장 침전지 보수	A=618㎡	10.03.03～ 10.05.07	50	(주)영웅토건	100
농어촌생활용수개발사업 (금마면 원종장앞)	L=1,007m (∮40~100mm)	10.03.04～ 10.06.07	32	(유)한국티엠에스	100
농어촌생활용수개발사업 (삼기면 궁교마을)	L=1,207m (∮25~75mm)	10.03.04～ 10.06.07	37	(유)신원건설	100
농어촌생활용수개발사업 (금마면 갈산마을)	L=1,637m (∮25~100mm)	10.03.05～ 10.06.28	54	(유)성옥건설	100
팔봉배수지 1호지 보수공사	A=1,377.6㎡	10.03.08～ 10.05.10	72	(유)송현건설	100
덕기동 하남마을 배수관 부설공사	L=1,883m (∮20~75mm)	10.03.09～ 10.06.12	45	(주)원광산업개발	100
용안면 법성마을외 1개소배수관 부설공사	L=1,130m (∮20~150M)	10.03.10～ 10.06.13	41	(유)정진건설	100
금마면 구룡마을 배수관 부설공사	L=2,142m (∮20~100mm)	10.03.10～ 10.06.13	58	(유)한국티엠에스	100
금마면 연동마을외 1개소 배수관부설공사	L=1,440m (∮20~75mm)	10.03.11～ 10.06.14	27	(주)삼학건설	100
금마면 용정마을 배수관 부설공사	L=1,155m (∮20~75mm)	10.03.11～ 10.06.14	30	(유)다산종합건설	100
덕기동 서성마을 배수관 부설공사	L=1,448m (∮40~75mm)	10.03.11～ 10.06.14	29	(주)디엠건설	100

사 업 명	사업개요	공사기간	총사업비	시공회사	공정(%)
제2공단 한솔홈데코 상수도관교체공사	L=1,071m	10.03.12～ 10.05.15	40	남성환경	100
은기동 은원마을외3개소 배수관 부설공사	L=1,715m (∮20~75mm)	10.03.15～ 10.06.16	39	(유)이레건설	100
금마면 각봉마을 배수관 부설공사	L=1,405m (∮20~100mm)	10.03.15～ 10.06.16	56	(주)신토성건설	100
석교마을 배수관부설공사	L=1,618m (∮25~150mm)	10.03.15～ 10.06.16	81	(유)에스엠건설	100
금마면 중왕마을 배수관 부설공사	L=1,720m (∮25~100mm)	10.03.19～ 10.06.21	65	동서전기공사	100
왕궁면 평리마을 배수관 부설공사	L=1,939m (∮25~100mm)	10.03.19～ 10.06.22	58	(유)장성건설	100
춘포면 궁월 반도 배수관 부설공사	L=1,187m (∮20~75mm)	10.03.22～ 10.06.23	38	(유)샬롬건설	100
슬러지콜렉타 제어반 보수공사	1식	10.03.22～ 10.04.19	45	(유)바울전기통신	100
왕궁면 갈촌마을 배수관 부설공사	L=1,239m (∮25~75mm)	10.03.23～ 10.06.26	34	(유)제성건설	100
왕궁면 평화촌마을 배수관 부설공사	L=1,548m (∮25~75mm)	10.03.23～ 10.06.26	32	(유)성옥건설	100
여산면 남산마을 배수관 부설공사	L=1,546m (∮20~75mm)	10.03.24～ 10.06.27	31	(유)신원건설	100
삼기면 원기산마을 배수관 부설공사	L=2,266m (∮25~75mm)	10.03.26～ 10.06.29	65	(유)범일조경	100
여산면 석교마을 배수관 부설공사	L=1,609m (∮40~100mm)	10.03.30～ 10.07.03	54	(유)성지토건	100
신흥정수장 침전지 슬러지 개선공사	1식	10.04.02～ 10.05.27	40	(유)효동건설	100
금마면 신기마을 배수관 부설공사	L=1,813m (∮25~75mm)	10.04.19～ 10.06.21	49	(주)한백건설	100
삼기면 마동마을 배수관 부설공사	L=1,833m (∮25~75mm)	10.04.19～ 10.07.21	44	(주)건지토건	100
왕궁면 마동마을 배수관 부설공사	L=1,599m (∮25~150mm)	10.04.19～ 10.07.21	54	(유)한양기업사	100
팔봉동 구기마을 배수관 부설공사	L=1,436m (∮20~75mm)	10.04.20～ 10.07.21	40	(유)일성종합건설	100

사 업 명	사업개요	공사기간	총사업비	시공회사	공정(%)
남중동 이리여고옆 상수도관 교체공사	L=300m (∮150mm)	10.05.06～ 10.11.05	37	(유)효동건설	100
마동가압장 설치공사	1식	10.05.30～ 10.11.01	86	(유)효동건설	100
용안면 법성마을 2차분 외 2개소 배수관부설공사	L=1,772m (∮40~100mm)	10.06.03～ 10.09.07	54	(유)보건	100
관내 변류시설물 정비	9개소	10.06.07～ 10.07.31	31	(유)범일조경	100
금마면 각봉마을 지방도 배수관 부설공사	L=760m (∮40~75mm)	10.06.08～ 10.08.12	32	(주)삼일공사	100
춘포면 안수마을 작목 마을간 배수관 부설공사	L=2,090m (∮75mm)	10.06.08～ 10.08.12	39	(유)대주건설	100
왕궁면 저유소부근 배수관 부설공사	L=1,500m (∮25~200mm)	10.06.10～ 10.09.11	53	(유)제성건설	100
금마면 신촌마을 왕궁 부상간 배수관 부설공사	L=622m (∮25~150mm)	10.06.15～ 10.09.18	40	(유)로진건설	100
여산면 연명마을 배수관 부설공사	L=2,057m (∮20~100mm)	10.06.15～ 10.12.18	74	(유)태강건설	100
춘포면 입석마을 상수도관 교체공사	L=515m (∮75mm)	10.06.16～ 10.08.19	30	(유)영웅건설	100
웅포면 체육센터 배수관 부설공사	L=1,340m (∮40~100mm)	10.06.16～ 10.09.18	42	(유)이레건설	100
목천동 구산업도로외 1개소 배수관부설공사	∮100~300mm	10.06.16～ 10.09.18	65	(유)이레건설	100
남중동 가압장 설치공사	1식	10.06.17～ 10.10.07	75	(유)동호건설	100
여산면 학동마을 배수관 부설공사	L=1,941m (∮20~75mm)	10.06.18～ 10.09.18	46	푸른엔지니어링	100
신흥정수장 중앙감시 제어설비 교체공사	1식	10.06.23～ 10.12.21	402	(유)연호미디어	100
왕궁면 사곡마을 배수관 부설공사	L=1,352m	10.11.11～ 10.12.24	54	(주)일호개발	100
금마면 미륵사지 교차로 누수처 보수공사	L=65m	10.12.09～ 11.03.14	232	(유)부광건설	100

7. 2010년 각종 민원(진정, 건의, 청원 등)

접수 처리내역

확인자	:	상수관리과장		안 재 억	ꄫ
작성자	:	상수행정담당		국 승 원	ꄫ
작성자	:	정수생산담당		석 금 산	ꄫ
작성자	:	급수시설담당		전 종 배	ꄫ
작성자	:	요금담당		변 명 숙	ꄫ
작성자	:	누수방지담당		윤 서 용	ꄫ
작성자	:	수질실험담당		문 대 은	ꄫ

해  당   없  음

8. 기금 운용 관련

확인자	:	상수관리과장		안 재 억	ꄫ
작성자	:	상수행정담당		국 승 원	ꄫ
작성자	:	요금담당		변 명 숙	ꄫ

해  당   없  음

9. 위원회(자문위원회 포함)운영관련

확인자	:	상수관리과장		안 재 억	ꄫ
작성자	:	수질실험담당		문 대 은	ꄫ

□ 수돗물평가위원회 관련 현황

○ 위원회 설치 현황

위 원 회 명	설 치 근 거	위원장	위원수	기능
수돗물평가위원회	․ 수도법 제30조 ․ 상수도급수조례 제51조	부시장	10명	자문

○ 위원 명단

직 위	성 명	소 속 및 직 위	직 위	성 명	소 속 및 직 위
위 원 장	유 기 상	익산시 부시장	위 원	이 영 미	대한주부클럽연합회 익산지부 지부장
위 원	최 광 석	상하수도사업단장	〃	김 은 경	익산 YWCA 회 장
〃	주 유 선	익산시의회의원	〃	강 신 애	익 산 시 새마을 부녀회장
〃	강 종 규	익 산 시 청 환경위생과장	〃	이 흥 수	원광대학교 예방치과 교수
〃	김 중 만	익 산 시 청 하수관리과장	〃	김 강 주	원광대학교 구강미생물과 교수

○ 위원회 운영현황

▸개 최 일  :  2010. 12. 27.

▸수당지급  :  350천원(민간인 5명)

▸회의내용  :  상수도분야 주요업무, 원․정수 수질검사 결과, 저수압 지역 해소대책, 정수장 홍보 활성화, 갈수기 수질관리 등

10. 용역사업 관련

확인자	:	상수관리과장		안 재 억	ꄫ
작성자	:	정수생산담당		석 금 산	ꄫ
작성자	:	급수시설담당		전 종 배	ꄫ
작성자	:	누수방지담당		윤 서 용	ꄫ

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요	공사기간	총사업비	시공회사	공정(%)
계	4건		70
신흥정수장 중앙감시제어 설비 교체공사실시설계용역	중앙감시 1식	10.02.16 ～10.04.20	25	(유)중앙기술공사	100
2011년 농어촌생활용수 개발사업 실시설계용역	실시설계 L=10km (8개마을)	10.05.10～ 10.07.18	26	(유)장흥건설기술공사	100
익산시 상수관로 누수탐사 용역	L=5.0km	10.05.26 ～ 10.06.18	10	(주)한국빅텍	100
금마 미륵사지 교차로 누수처 보수공사 실시설계용역	실시설계 1식	10.11.17 ～ 10.11.24	9	(주)주한건설 기술단	100

11. 각종 민간사회단체 보조금지원 관련

확인자	:	상수관리과장		안 재 억	ꄫ
작성자	:	상수행정담당		국 승 원	ꄫ
작성자	:	요금담당		변 명 숙	ꄫ

해  당   없  음

12. 인․허가 민원관련

확인자	:	상수관리과장		안 재 억	ꄫ
작성자	:	누수방지담당		윤 서 용	ꄫ

해  당   없  음

13. 각종 공사 설계변경상황

확인자	:	상수관리과장		안 재 억	ꄫ
작성자	:	급수시설담당		전 종 배	ꄫ
작성자	:	누수방지담당		윤 서 용	ꄫ

(단위 : 백만원)

일자	사 업 명	예산액	계 약 액			계약자	공사기간	변경사유
			당초	변경	증감
계	33건		1,622	1,637	15
05.18	농어촌생활용수개발사업 (왕궁면 갈전마을)		46	44	△2	(유)장성건설	10.03.03～ 10.05.26	물량변동
06.01	농어촌생활용수개발사업 (삼기면 궁교마을)		35	37	2	(유)신원건설	10.03.04～ 10.06.07	누락분 반영
06.04	농어촌생활용수개발사업 (금마면 갈산마을)		61	54	△7	(유)성옥건설	10.03.05～ 10.06.28	물량변동
05.28	덕기동 하남마을 배수관 부설공사		45	51	6	(주)원광산업개발	10.03.09～ 10.06.12	누락분 반영
06.11	용안면 법성마을외 1개소 배수관 부설공사		43	41	△2	(유)정진건설	10.03.10～ 10.06.13	물량변동
06.04	금마면 구룡마을 배수관 부설공사		52	58	6	(유)한국티엠에스	10.03.10～ 10.06.13	누락분 반영
06.07	금마면 연동마을외 1개소 배수관 부설공사		35	27	△8	(주)삼학건설	10.03.11～ 10.06.14	물량변동
06.07	금마면 용정마을 배수관 부설공사		38	30	△8	(유)다산종합	10.03.11～ 10.06.14	물량변동
05.18	덕기동 서성마을 배수관 부설공사		39	29	△10	(주)디엠건설	10.03.11～ 10.06.14	물량변동
06.04	제2공단 옥시-국도 화학간 상수도관교체		23	32	9	(유)이레건설	10.03.15～ 10.06.17	누락분 반영
06.04	은기동 은원마을외3 개소 배수관부설공사		40	39	△1	(유)이레건설	10.03.15～ 10.06.16	물량변동
06.14	왕궁면 평리마을 배수관 부설공사		68	58	△10	(유)장성건설	10.03.19～ 10.06.22	물량변동

일자	사 업 명	예산액	계 약 액			계약자	공사기간	변경사유
			당초	변경	증감
06.15	춘포면 궁월 반도 배수관 부설공사		39	38	△1	(유)샬롬건설	10.03.22～ 10.06.23	물량변동
06.21	여산면 진사마을 배수관 부설공사		27	24	△3	(유)월드비전건설	10.03.23～ 10.06.26	물량변동
06.01	왕궁면 갈촌마을 배수관 부설공사		33	34	1	(유)제성건설	10.03.23～ 10.06.26	누락분 반영
06.24	왕궁면 평화촌마을 배수관 부설공사		39	32	△7	(유)성옥건설	10.03.23～ 10.06.26	물량변동
06.22	삼기면 원기산마을 배수관 부설공사		63	65	2	(유)범일조경	10.03.26～ 10.06.29	누락분 반영
05.25	목천동 화정마을 상수도관 교체공사		29	28	△1	(유)보명	10.03.30～ 10.06.13	물량변동
06.22	여산면 석교마을 배수관 부설공사		52	54	2	(유)성지토건	10.03.30～ 10.07.03	누락분 반영
06.08	금마면 황동마을 배수관 부설공사		24	27	3	(유)성옥건설	10.04.09～ 10.06.13	누락분 반영
06.18	금마면 연동마을2차분외 1개소 배수관 부설공사		26	27	1	(유)이레건설	10.04.13～ 10.07.17	누락분 반영
06.18	금마면 신기마을 배수관 부설공사		44	49	5	(주)한백건설	10.04.19～ 10.06.21	누락분 반영
06.21	왕궁면 마동마을 배수관 부설공사		59	54	△5	(유)한양기업사	10.04.19～ 10.07.21	물량변동
06.21	팔봉동 구기마을 배수관 부설공사		42	40	△2	(유)일성 종합건설	10.04.20～ 10.07.21	물량변동
09.14	마동가압장 설치공사		80	86	6	(유)효동건설	10.05.30～ 10.11.01	누락분 반영
08.06	금마면 각봉마을 지방도간 배수관 부설		33	32	△1	(주)삼일공사	10.06.08～ 10.08.12	물량변동
08.05	춘포면 안수마을 작목 마을간 배수관부설공사		41	39	△2	(유)대주건설	10.06.08～ 10.08.12	물량변동
08.30	왕궁면 저유소부근 배수관 부설공사		54	52	△2	(유)제성건설	10.06.10～ 10.09.11	물량변동
09.10	웅포면 체육센터 배수관 부설공사		39	42	3	(유)이레건설	10.06.16～ 10.09.18	관보호시설반영
09.10	목천동 구산업도로외 1개소 배수관 부설공사		61	65	4	(유)이레건설	10.06.16～ 10.09.18	누락분 반영
08.17	남중동 가압장설치공사		71	75	4	(유)동호건설	10.06.17～ 10.10.07	급수구역확장
09.16	여산면 학동마을 배수관 부설공사		49	46	△3	(유)푸른 엔지니어링	10.06.18～ 10.09.18	포장계획변경
11. 03.07	금마면 미륵사지 교차로누수처 보수공사		192	232	40	(유)부광건설	10.12.09～ 11.03.14	물량변동

14. 건설공사 집행현황(3천만원이상)

확인자	:	상수관리과장		안 재 억	ꄫ
작성자	:	정수생산담당		석 금 산	ꄫ
작성자	:	급수시설담당		전 종 배	ꄫ
작성자	:	누수방지담당		윤 서 용	ꄫ

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요	공사기간	총사업비	시공회사	공정(%)
계	48건		2,821
농어촌생활용수개발사업 (왕궁면 중리마을)	L=1,392m (∮25~75mm)	10.02.23～ 10.05.26	45	(유)동원건설	100
농어촌생활용수개발사업 (왕궁면 갈전마을)	L=1,622m (∮25~75mm)	10.03.03～ 10.05.26	44	(유)장성건설	100
신흥정수장 침전지 보수	A=618㎡	10.03.03～ 10.05.07	50	(주)영웅토건	100
농어촌생활용수개발사업 (금마면 원종장앞)	L=1,007m (∮40~100mm)	10.03.04～ 10.06.07	32	(유)한국티엠에스	100
농어촌생활용수개발사업 (삼기면 궁교마을)	L=1,207m (∮25~75mm)	10.03.04～ 10.06.07	37	(유)신원건설	100
농어촌생활용수개발사업 (금마면 갈산마을)	L=1,637m (∮25~100mm)	10.03.05～ 10.06.28	54	(유)성옥건설	100
팔봉배수지 1호지 보수공사	A=1,377.6㎡	10.03.08～ 10.05.10	72	(유)송현건설	100
덕기동 하남마을 배수관 부설공사	L=1,883m (∮20~75mm)	10.03.09～ 10.06.12	45	(주)원광산업개발	100
용안면 법성마을외 1개소배수관 부설공사	L=1,130m (∮20~150M)	10.03.10～ 10.06.13	41	(유)정진건설	100
금마면 구룡마을 배수관 부설공사	L=2,142m (∮20~100mm)	10.03.10～ 10.06.13	58	(유)한국티엠에스	100
금마면 연동마을외 1개소 배수관부설공사	L=1,440m (∮20~75mm)	10.03.11～ 10.06.14	27	(주)삼학건설	100
금마면 용정마을 배수관 부설공사	L=1,155m (∮20~75mm)	10.03.11～ 10.06.14	30	(유)다산종합건설	100
덕기동 서성마을 배수관 부설공사	L=1,448m (∮40~75mm)	10.03.11～ 10.06.14	29	(주)디엠건설	100

사 업 명	사업개요	공사기간	총사업비	시공회사	공정(%)
제2공단 한솔홈데코 상수도관교체공사	L=1,071m	10.03.12～ 10.05.15	40	남성환경	100
은기동 은원마을외3개소 배수관 부설공사	L=1,715m (∮20~75mm)	10.03.15～ 10.06.16	39	(유)이레건설	100
금마면 각봉마을 배수관 부설공사	L=1,405m (∮20~100mm)	10.03.15～ 10.06.16	56	(주)신토성건설	100
석교마을 배수관부설공사	L=1,618m (∮25~150mm)	10.03.15～ 10.06.16	81	(유)에스엠건설	100
금마면 중왕마을 배수관 부설공사	L=1,720m (∮25~100mm)	10.03.19～ 10.06.21	65	동서전기공사	100
왕궁면 평리마을 배수관 부설공사	L=1,939m (∮25~100mm)	10.03.19～ 10.06.22	58	(유)장성건설	100
춘포면 궁월 반도 배수관 부설공사	L=1,187m (∮20~75mm)	10.03.22～ 10.06.23	38	(유)샬롬건설	100
슬러지콜렉타 제어반 보수공사	1식	10.03.22～ 10.04.19	45	(유)바울전기통신	100
왕궁면 갈촌마을 배수관 부설공사	L=1,239m (∮25~75mm)	10.03.23～ 10.06.26	34	(유)제성건설	100
왕궁면 평화촌마을 배수관 부설공사	L=1,548m (∮25~75mm)	10.03.23～ 10.06.26	32	(유)성옥건설	100
여산면 남산마을 배수관 부설공사	L=1,546m (∮20~75mm)	10.03.24～ 10.06.27	31	(유)신원건설	100
삼기면 원기산마을 배수관 부설공사	L=2,266m (∮25~75mm)	10.03.26～ 10.06.29	65	(유)범일조경	100
여산면 석교마을 배수관 부설공사	L=1,609m (∮40~100mm)	10.03.30～ 10.07.03	54	(유)성지토건	100
신흥정수장 침전지 슬러지 개선공사	1식	10.04.02～ 10.05.27	40	(유)효동건설	100
금마면 신기마을 배수관 부설공사	L=1,813m (∮25~75mm)	10.04.19～ 10.06.21	49	(주)한백건설	100
삼기면 마동마을 배수관 부설공사	L=1,833m (∮25~75mm)	10.04.19～ 10.07.21	44	(주)건지토건	100
왕궁면 마동마을 배수관 부설공사	L=1,599m (∮25~150mm)	10.04.19～ 10.07.21	54	(유)한양기업사	100
팔봉동 구기마을 배수관 부설공사	L=1,436m (∮20~75mm)	10.04.20～ 10.07.21	40	(유)일성종합건설	100

사 업 명	사업개요	공사기간	총사업비	시공회사	공정(%)
남중동 이리여고옆 상수도관 교체공사	L=300m (∮150mm)	10.05.06～ 10.11.05	37	(유)효동건설	100
마동가압장 설치공사	1식	10.05.30～ 10.11.01	86	(유)효동건설	100
용안면 법성마을 2차분 외 2개소 배수관부설공사	L=1,772m (∮40~100mm)	10.06.03～ 10.09.07	54	(유)보건	100
관내 변류시설물 정비	9개소	10.06.07～ 10.07.31	31	(유)범일조경	100
금마면 각봉마을 지방도 배수관 부설공사	L=760m (∮40~75mm)	10.06.08～ 10.08.12	32	(주)삼일공사	100
춘포면 안수마을 작목 마을간 배수관 부설공사	L=2,090m (∮75mm)	10.06.08～ 10.08.12	39	(유)대주건설	100
왕궁면 저유소부근 배수관 부설공사	L=1,500m (∮25~200mm)	10.06.10～ 10.09.11	53	(유)제성건설	100
금마면 신촌마을 왕궁 부상간 배수관 부설공사	L=622m (∮25~150mm)	10.06.15～ 10.09.18	40	(유)로진건설	100
여산면 연명마을 배수관 부설공사	L=2,057m (∮20~100mm)	10.06.15～ 10.12.18	74	(유)태강건설	100
춘포면 입석마을 상수도관 교체공사	L=515m (∮75mm)	10.06.16～ 10.08.19	30	(유)영웅건설	100
웅포면 체육센터 배수관 부설공사	L=1,340m (∮40~100mm)	10.06.16～ 10.09.18	42	(유)이레건설	100
목천동 구산업도로외 1개소 배수관부설공사	∮100~300mm	10.06.16～ 10.09.18	65	(유)이레건설	100
남중동 가압장 설치공사	1식	10.06.17～ 10.10.07	75	(유)동호건설	100
여산면 학동마을 배수관 부설공사	L=1,941m (∮20~75mm)	10.06.18～ 10.09.18	46	푸른엔지니어링	100
신흥정수장 중앙감시 제어설비 교체공사	1식	10.06.23～ 10.12.21	402	(유)연호미디어	100
왕궁면 사곡마을 배수관 부설공사	L=1,352m	10.11.11～ 10.12.24	54	(주)일호개발	100
금마면 미륵사지 교차로 누수처 보수공사	L=65m	10.12.09～ 11.03.14	232	(유)부광건설	100

15. 민간에 대한 보조금 집행내역

확인자	:	상수관리과장		안 재 억	ꄫ
작성자	:	상수행정담당		국 승 원	ꄫ
작성자	:	정수생산담당		석 금 산	ꄫ
작성자	:	급수시설담당		전 종 배	ꄫ
작성자	:	요금담당		변 명 숙	ꄫ
작성자	:	누수방지담당		윤 서 용	ꄫ
작성자	:	수질실험담당		문 대 은	ꄫ

해  당   없  음

16. 국·도비 보조사업 집행현황(1억원이상)

확인자	:	상수관리과장		안 재 억	ꄫ
작성자	:	급수시설담당		전 종 배	ꄫ

(단위 : 백만원)

사업명	사업개요	사업기간	2009년 예산액					집행액	비고
			계	국비	도비	시비	민자
농어촌생활 용수개발사업	23개마을 L= 30.0㎞	2010.1 ～ 2010.10	2,000	1,400		600		2,000

17. 명시 및 사고이월사업비 집행 내역

확인자	:	상수관리과장		안 재 억	ꄫ
작성자	:	급수시설담당		전 종 배	ꄫ
작성자	:	누수방지담당		윤 서 용	ꄫ

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요	사업기간	총사업비	이월액	공정(%)	비고
계	3건		2,752	1,723
읍면지역 상수관로누수탐사 및 불록구축실시설계용역	12개블록	09. 05. 29～ 10. 08. 14	289	247	100	명시이월
익산시수도정비기본계획 수 립 용 역	기본계획수립용역 1식	09. 06. 22～ 10. 06. 24 (용역중지 10. 6.22)	1,866	1,306	94	명시이월 (승인시까지중지)
가뭄지역 소규모 수도시설 개량사업	관정개발 3개마을 관로시설 4개마을	09. 06. 22～ 10. 06. 24	597	170	100	명시이월

18. 예산전용 사항 및 예비비 집행 사항

확인자	:	상수관리과장		안 재 억	ꄫ
작성자	:	상수행정담당		국 승 원	ꄫ
작성자	:	정수생산담당		석 금 산	ꄫ

사업명	지출결정액	지출액	지 출 결정일	승인일자	지출사유	비고
계	18,840	18,840
호우피해 복구사업	18,840	18,840	2010.11.26	2010.11.26	2010.8.14~8.15 호우피해 복구	예비비

19. 공사 준공기한 연장 내역

확인자	:	상수관리과장		안 재 억	ꄫ
작성자	:	정수생산담당		석 금 산	ꄫ
작성자	:	급수시설담당		전 종 배	ꄫ
작성자	:	누수방지담당		윤 서 용	ꄫ

해  당   없  음

20. 국. 도비 예산중 사업 미시행으로 전액      반납한 예산 현황

확인자	:	상수관리과장		안 재 억	ꄫ
작성자	:	상수행정담당		국 승 원	ꄫ
작성자	:	급수시설담당		전 종 배	ꄫ

해  당   없  음

21. 국. 도비 반납 현황

확인자	:	상수관리과장		안 재 억	ꄫ
작성자	:	상수행정담당		국 승 원	ꄫ
작성자	:	급수시설담당		전 종 배	ꄫ

해  당   없  음

22. 2010년도 계획사업 중 미착공사업 현황

확인자	:	상수관리과장		안 재 억	ꄫ
작성자	:	정수생산담당		석 금 산	ꄫ
작성자	:	급수시설담당		전 종 배	ꄫ
작성자	:	누수방지담당		윤 서 용	ꄫ

해  당   없  음

23. 2010년도 계획사업 중 유보 및 취소된       사업현황

확인자	:	상수관리과장		안 재 억	ꄫ
작성자	:	정수생산담당		석 금 산	ꄫ
작성자	:	급수시설담당		전 종 배	ꄫ
작성자	:	누수방지담당		윤 서 용	ꄫ

해  당   없  음

24. 2010년도 이월사업중 유보 및 취소된 사업

확인자	:	상수관리과장		안 재 억	ꄫ
작성자	:	상수행정담당		국 승 원	ꄫ
작성자	:	정수생산담당		석 금 산	ꄫ
작성자	:	급수시설담당		전 종 배	ꄫ
작성자	:	누수방지담당		윤 서 용	ꄫ

해  당   없  음

25. 2010년도 예산편성후 전액 미집행 내역

확인자	:	상수관리과장		안 재 억	ꄫ
작성자	:	상수행정담당		국 승 원	ꄫ
작성자	:	정수생산담당		석 금 산	ꄫ
작성자	:	급수시설담당		전 종 배	ꄫ
작성자	:	요금담당		변 명 숙	ꄫ
작성자	:	누수방지담당		윤 서 용	ꄫ
작성자	:	수질실험담당		문 대 은	ꄫ

해  당   없  음

26. 소송 사건 현황

확인자	:	상수관리과장		안 재 억	ꄫ
작성자	:	상수행정담당		국 승 원	ꄫ
작성자	:	정수생산담당		석 금 산	ꄫ
작성자	:	급수시설담당		전 종 배	ꄫ
작성자	:	요금담당		변 명 숙	ꄫ
작성자	:	누수방지담당		윤 서 용	ꄫ
작성자	:	수질실험담당		문 대 은	ꄫ

해  당   없  음

27. 시홈페이지에 접수된 민원처리 현황

확인자	:	상수관리과장		안 재 억	ꄫ
작성자	:	상수행정담당		국 승 원	ꄫ
작성자	:	급수시설담당		전 종 배	ꄫ
작성자	:	요금담당		변 명 숙	ꄫ
작성자	:	누수방지담당		윤 서 용	ꄫ
작성자	:	수질실험담당		문 대 은	ꄫ

연번	민 원 내 용			처 리 결 과	비 고
	일 자	성 명	내 용
1	2010. 1.15	조평훈	2공단 입주업체입니다. 몇 일째 상수압력이 너무 낮습니다. 압력 좀 높여주세요.	우리시 관내 급수원활을 위하여 변류 및 관로점검 등을 하여 불편을 최소화하였음.	상하수도사업단에바란다 208
2	2010. 1.18	박상서	수도관이 얼어 전화했는데 답변이 너무 불친절 합니다. 빨리 수도관 고쳐주세요.	민원을 처리하기 위해서는 주소와 휴대전화번호가 필요하니 상수과로 연락을 바람.	시정에바란다 8984
3	2010 1.21	유정은	날이 추워 수도관이 얼었는데 날 풀린 이후에도 물이 안나오네요. 이유가 뭔가요.	2010년 겨울이 예년과 달리 혹한으로 상수도 옥내급수관이 얼어 나오지 않은 것으로 판단됨.	상하수도사업단에바란다 209
4	2010. 2.01	성영록	여산면 제남리 석교부락에 지역상수도 공사를 해주세요.	예산형편상 일시에 공급하지 못하는 점을 이해 바라며, 예산이 허용하는 범위에서 연차적으로 공급할 계획임.	시정에바란다 9008
5	2010. 2.01	박종희	오산면 신지리 신화부락에 개인급수시설 설치하려면 어떻게 해야 하나요.	개인급수공사 신청시 조사설계수수료 20,000원을 선납해야 하며 상수관리과 급수시설계로 연락 후 상담을 하시길 바랍니다.	시정에바란다 9009
6	2010. 5.07	권영인	영등동 휘트니스센터 회원으로 약500여명이 운동을 하고 있으며 전세기간도 남아있고 수도요금도 정상적으로 납부하였는데 건물주가 폐쇄를 의뢰하였다고 시에서 수도를 페쇄 해도 되는지	불편을 드린 점 죄송, 건물주의 계량기 폐전신청에 의하여 익산시상수도급수조례제24조에 따라 처리하였음	시정에바란다 9335

연번	민 원 내 용			처 리 결 과	비 고
	일 자	성 명	내 용
7	2010. 5.07	김오천	시 행정이란 개인의 편익을 위한 소도구 역할을 해서는 아니된다 여기며 다수건 소수건 시민에게 피해가 없어야 할텐데, 상식과 책임있는 공익사업을 수행하는 올바른 시정을 기대하며(영등동 휘트니스센터폐전관련)	불편을 드린 점 죄송. 소유주의 계량기 폐전신청에 의하여 익산시상수도급수조례 제24조에 따라 처리하였음	시정에바란다 9339
8	2010. 6.03	정남규	모현 아파트 단지내에 수도관이 터져 물이 새고 있습니다.	시정 발전에 적극 참여해 주셔서 감사하며 모현아파트 단지 내 누수처는 6월 4일 보수 완료했습니다.	시정에바란다 9440
9	2010. 6.07	홍경미	수도에서 녹물이 나와 급식을 할 수 없어요.	적수 발생으로 피해를 입으신 점 죄송하오며 민원 접수 즉시 현장에서 적수배출을 실시하여 해소하였습니다.	상하수도사업단에바란다 214
10	2010 6.09	조강래	우남샘물타운 사거리 도로에 하수구 뚜껑이 고정이 안돼있어 차가 지나갈 때 마다 소리가 납니다.	시정 발전에 협조하여 주신 점 감사드리며 요청하신 민원 건에 대하여 당일 방문 복구하였습니다.	시정에바란다 9474
11	2010. 6.09	한철형	마동 주공아파트에서 몇 일째 녹물이 나오고 있습니다. 빠른 시정 바랍니다.	단지 내 배관이 노후 되어 녹물이 발생하고 있는 것으로 판단됩니다. 이 와 같은 상황에서는 아파트 단지에서 자체적으로 수도관 정비 계획을 세워서 대처해야 할 것으로 사료됩니다.	시정에바란다 9473
12	2010. 6.09	한철형	마동 주공 아파트에서 아침마다 녹물이 나옵니다. 시정해 주세요.	단지 내 배관이 노후 되어 녹물이 발생하고 있는 것으로 판단됩니다. 이 와 같은 상황에서는 아파트 단지에서 자체적으로 수도관 정비 계획을 세워서 대처해야 할 것으로 사료됩니다.	시정에바란다 9475

연번	민 원 내 용			처 리 결 과	비 고
	일 자	성 명	내 용
13	2010. 6.12	이상진	갑작스런 단수에 당황스럽습니다. 무슨 이유에서 인가요?	불편을 드린 점 죄송하며, 현장에서 누수처 복구를 하는 과정에서 단수예고를 하지 못한 것으로 사료됩니다. 앞으로 사전 예고 방송을 하여 피해를 최소화 하겠습니다.	시정에바란다 9491
14	2010. 6.15	서태선	마동 주공 아파트 수압이 너무 약합니다.	공급 수압이 약해 불편을 끼친 점 죄송하오며 빠른 시일 내에 방문하여 개선하도록 하겠습니다.	시정에바란다 8610
15	2010. 7.05	서영준	상수도에서 녹물과 시궁창 냄새가 납니다.	하절기 수온상승 및 사용량 증가로 유속이 변화되어 물 떼가 탈락되면서 유입된 것 같습니다. 조속히 시정하겠습니다.	시정에바란다 9608
16	2010. 7.14	양환배	공업용수 공급량을 늘려 주시기 바랍니다.	수압 저하로 인한 불편을 끼쳐드려 죄송하오며 현재는 수압 저조요인을 찾아 개선하였습니다.	상하수도사업단에바란다 216
17	2010. 7.15	정여진	아침마다 녹물이 나와요..	상수도 공급과정에서 적수가 발생하게 된 점 죄송하오며 빠른 시일 내에 방문하여 적수발생원인을 해소 할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.	상하수도사업단에바란다 217
18	2010. 7.17	이종선	삼기면 연동리 연동마을에 상수도 설치를 바랍니다.	현재 문의하신 연동마을은 상수도급수 배수관이 공급된 지역입니다 .개인급수공사 신청은 859-4411로 문의 주시면 계량기까지 시설해 드리도록 하겠습니다.	시정에바란다 9670

연번	민 원 내 용			처 리 결 과	비 고
	일 자	성 명	내 용
19	2010. 7.20	이춘호	비온 뒤 상수도에서 흙탕물이 나옵니다. 개선해 주십시오.	상수도 공급에 의해 피해를 입으신 점 죄송하오며 상수관리과(859-4411~4414)로 전화 주시어 구체적인 거주지역을 알려주시면 즉시 방문해 해결하도록 하겠습니다.	시정에바란다 9693
20	2010. 8.02	한다영	상수도가 터졌는데 조치가 너무 느립니다.	문의 주신 상수누수에 대하여 당일 오전에 복구완료 하였음을 알려드리며, 먼저 접수된 누수 복구공사로 인하여 지연되었습니다. 빠른 민원 처리를 위하여 노력하겠습니다.	시정에바란다 9755
21	2010. 8.03	양대호	수도 공사 시에 쌓아놓은 자갈 흙 덩이에 물 좀 뿌려주세요.	일상생활에 불편을 드리게 된 점 죄송하오며 시공업체로 하여금 이를 시정토록 조치하였습니다.	시정에바란다 9767
22	2010. 8.05	김동호	미납요금 때문에 단수가 되어 1개월요금만 담당자에게 양해를 구하고 수도요금을 납부하였는데 집을 나간사이에 수도를 단수하였음. 이것은 무단침입이라고 생각됨	그동안 수차에 걸쳐 체납된 상수도 요금을 납부토록 독려하였으나, 3개월 요금을 2010.8.2까지 납부하기로 약속을 하였음 2010.8.4일 1개월 요금만 납부되어 귀댁을 방문 하였는데 이사 간다는 메모지와 함께 문이 열려 있어 규정에 의거 단수처리 하였음.	시정에바란다 9775
23	2010. 8.06	김보건	저녁에 쌀을 씻는데 녹물이 나옵니다. 사업소에 전화를 해도 받는 사람이 없네요.	상수도 공급과정에서 녹물이 발생하게 된 점 죄송하게 생각하오며 연락과정에서 불편을 드린 점도 사과드립니다. 앞으로 적수발생 및 연락과정을 시정하도록 하겠습니다.	상하수도사업단에바란다 218
24	2010.08.09	김동호	문이 열려 있다 해도 사람이 있어야 말을 하고 단수를 해야 된다고 생각됨.	체납요금으로 인하여 수도가 단수 된다고 그동안 수차례 방문도 하고 유선으로도 통보하였음.	시정에바란다 9789

연번	민 원 내 용			처 리 결 과	비 고
	일 자	성 명	내 용
25	2010. 8.10	홍종혁	상수도 요금이 매달 15만원 정도 나오고 있음. 누수가 되는지 계량기가 이상이 있는지 신고하였는데 처리 좀 해주세요.	누수여부는 집 내부에서 쓰는 수도꼭지를 모두 잠그고 계량기의 빨간 별모양이 돌아가는지를 보시면 됩니다. 누수는 (859-4414) 계량기 검사는 (859-4413)으로 전화주시면 점검 해드리겠습니다.	상하수도사업단에바란다 219
26	2010. 8.10	홍종혁	터무니없는 상수도 요금문의	수도요금이 많이 나온 이유는 누수가 발생한 것으로 검침담당자가 거주하고계신 민원인의 아버님께 누수 검사공사에 대해 충분히 설명 드려 이해하신 사항입니다.	상하수도사업단에바란다 220
27	2010. 8.14	양금숙	하수도와 오폐수 공사로 배관만 묻어두고 몇 달째 방치해서 흙이 묻어나 불편합니다.	배수설비 공사 후 포장복구 지연으로 불편을 드려 죄송합니다. 그간 장마로 인해 부득이 포장복구가 지연되어 시공사에 조속히 포장토록 지시하였습니다.	상하수도사업단에바란다 221
28	2010. 8.18	최동원	다가구 주택에 사는데 계량기가 막 돌아가네요. 어느 곳에서 물이 새는지 알 수 없어서 누수탐사 좀 해주세요.	누수탐사를 이미 신청하신 분들이 있어 바로 누수탐사가 어려움을 말씀드리며 조속히 처리될 수 있도록 하겠습니다.	상하수도사업단에바란다 222
29	2010. 8.18	이동철	상수도공사 후 도로가 복구되지 않은 채 3개월 째 방치되었습니다. 빠른 복구 부탁드려요.	미 복구된 아스콘 부분 복구는 금명간에 원상복구토록 조치하였음을 알려드리오며 그간 불편을 드린 점에 대하여 거듭 사죄드리고 앞으로는 이런 일이 재발하지 않도록 최선을 다 하겠습니다.	시정에바란다 9854

연번	민 원 내 용			처 리 결 과	비 고
	일 자	성 명	내 용
30	2010. 8.21	허종희	평화동에서 구 산업도로로 진입하는 구간에서 매설작업이 덜 된 지역을 지나다 타이어가 펑크가 났습니다.	본 공사 중 잡석 유실 등으로 통행에 불편을 끼쳐드리게 된 점 죄송스럽게 생각하며 21일 오전 포장복구 완료했으며 상수관리과(859-4411)로 보상관련 문의를 주시면 감사하겠습니다.	시정에바란다 9693
31	2010. 8.30	한대희	물이 너무 안나옵니다.	수돗물 사용과 관련하여 생활에 불편을 드리게 된 점 죄송하게 생각하오며 점검결과 상수도 공급수압(1.53Kg/cm2이상)은 적정수압이나 내부시설에 문제가 있어 급수불출현상이 발생한 것으로 판단됩니다.	시정에바란다 9941
32	2010. 9.26	한선영	수도에서 녹물이 나옵니다, 오셔서 검사 좀 해주세요.	상수도 공급과정에서 적수가 발생하게 되는 점 죄송하게 생각합니다. 이 후 발생되지 않도록 최선을 다할 것을 말씀드리며 재발생시 빠른 시간 내 방문하여 발생원인을 해소하겠습니다.	상하수도사업단에바란다 225
33	2010.10.10	김보건	상수도 공사시 미리 사전 양해를 구해주세요.	긴급 누수보수작업 등으로 인하여 사전홍보하지 못하므로 불편을 드리게 되는 점 죄송하게 생각합니다. 차후 정상적인 상수도 공사 시 관련내용을 미리 홍보하겠습니다.	시정에바란다 10101
34	2010.11.23	임준혁	상수도 공사업체 대호건설 김노수 대표이사님을 칭찬합니다.	칭찬이 쉽지 않은 사회 환경 가운데 일로 칭찬을 받은 사장님의 성실함에 칭찬을 보냅니다.	상하수도사업단에바란다 226

연번	민 원 내 용			처 리 결 과	비 고
	일 자	성 명	내 용
35	2010.11.25	김호철	상수도 급수공사가 너무 지연되고 있습니다.	불편을 드린 점 죄송하게 생각하며 현재 계량기 이설 공사를 24일 실시하였으나 도로를 횡으로 6m 정도 굴착하였음에도 상수도관을 정확히 찾지 못하여 점검 후 26일 도로에서 상수관로를 찾아 연결할 계획입니다.	시정에바란다 10283
36	2010.12.02	최은미	청아 아파트 입주민인데요. 상하수도 관리사업소에 야간 주차를 하지 말라니. 이게 무슨 소리인가요.	상하수도사업단 내 주차장에 야간주차를 하지 말라고 했다는 부분은 청아 아파트 관리소 직원의 전달과정에서 오해가 있었던 듯 합니다. 근무시간 이후인 야간에 상하수도사업단 주차장을 적극 이용하여 주시기 바랍니다.	시정에바란다 10310
37	2010.12.29	김진희	상수도 설치비용에 의문이 듭니다. 설명을 해주세요..	민원인께서 신청하신 급수공사 신청에 대하여 설계 요약을 적어 드립니다. 공과금 10만원 관급자재비 10만 3천원 공사비 24만 7천원 장비 운반비 4만 3천원 관로 공사비 5만 1천원 사급자재대 3만6천원으로 공사가 진행됩니다.	시정에바란다 10373
38	2010.12.29	최남열	직원의 불친절한 태도가 불만입니다.	귀하의 불편하여 문의하신 내용에 대하여 보다 친절하고 상세하게 설명 드리는 것이 타당하나, 직원의 불친절함에 진심으로 사과드리며 앞으로 직원회의 및 연찬 시 친절교육을 강화하여 이러한 사례가 발생치 않도록 최선을 다하겠습니다.	시정에바란다 9775

감사자료 과 요구사항

1. 상수도 공기업 운영 사항

확인자	:	상수관리과장		안 재 억	ꄫ
작성자	:	상수행정담당		국 승 원	ꄫ
작성자	:	급수시설담당		전 종 배	ꄫ
작성자	:	요금담당		변 명 숙	ꄫ

□ 현      황

○ 자    산  :  131,485백만원(자본 127,681   부채 3,804)

○ 총부채액  :  3,804백만원(2010. 12. 31일기준)

○ 부채비율  :  2.98%(자기자본 / 부채총계 × 100)

□ 추 진 실 적

○ 차 입 금   상  환	571백만원

▸ 재  특  자  금	212백만원

▸ 농어촌개발기금 (납부완료)	9백만원

▸ 지역 개발 기금	350백만원

○ 요금 부과․징수  :  부과액 24,548백만원   징수액 24,181백만원(98.5%)

○ 여유자금 효율적 관리  :  예치금 3,228백만원(이자수입 37백만원)

○ 급수수익  :  전년대비  24,548백만원으로 6.84%증가

2. 상수도요금 부과․징수 및 체납액 현황

확인자	:	상수관리과장		안 재 억	ꄫ
작성자	:	요금담당		변 명 숙	ꄫ

□ 부과징수 현황(2010년 결산결과)

(2010.12.31현재, 단위:백만원)

구 분	예산액 (A)	조정액 (B)	징수액 (C)	체납액 (D)	비 율
					B/A	C/B
합 계	22,829	24,548	24,181	367	107.5	98.5
가 정 용	10,110	10,587	10,462	125	104.7	98.8
일 반 용	7,706	7,988	7,823	165	103.7	97.9
대중탕용	95	73	73	0	76.8	100
산업용 및 전용공업용	4,918	5,900	5,823	77	120.0	98.7

□ 연도별 체납액 현황

(10.12.31현재, 단위:백만원)

년도 업종	합 계	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004 이전
합 계	760	367	24	111	70	36	79	73
가 정 용	181	124	11	13	7	6	7	13
일 반 용	352	165	8	33	63	20	28	35
대중탕용	77	0		1		10	41	25
산 업 용	66	58	5	3
전용공업용	84	20		61			3

□ 상수도사용료 체납액 현황(상위 20위)

(2010.12. 31현재, 단위 천원)

연번	수 용 가 명	수전번호	주 소	체납액	체납기간	비 고
계	20 명			267,468
1	신 일 섬 유	175-0113	팔봉동 제2공단 580_1	61,161	08.04 ～ 08.06	기업회생
2	한제임스본드	170-3167	영등동773_18(해송사우나)	58,569	07.11 ～ 08.01	임의경매-비승계
3	(주)그랜드관광호텔	156-0861	평화동 329_2	27,038	05.02 ～ 05.08	경매진행-교부신청
4	정 현 숙	165-4052	모현1가 504_1	14,227	03.04 ～ 03.11	압류
5	이 기 욱	167-1201	송학동 235_6	12,953	04.03 ～ 05.07	임의경매-비승계
6	길 기 은	170-3106	영등동 824_5	10,800	05.01 ～ 05.06	부도-소재불명
7	한제임스본드	160-0629	인화2가55_13(스파랜드,안쪽)	10,797	07.03 ～ 07.04	임의경매-비승계
8	한제임스본드	160-0631	인화2가55_13(스파랜드,입구)	9,975	07.03.～ 07.04	임의경매-비승계
9	박 연 옥	160-0270	인화2가 6 (원룸)	9,142	06.03 ～ 06.07	임의경매-비승계
10	(주)그랜드관광호텔	156-0863	평화동 329_2	7,463	06.11 ～ 07.03	경매진행-교부신청
11	김 주 호	176-0664	1037 (익산보석사우나)	7,242	05.02 ～ 05.07	소재불명
12	김 은 순	161-3423	1045_5(호남병원)	6,811	04.02.～ 04.04	임의경매-비승계
13	금호주택관리소	131-0990	와리 251-5 (주)금호주택	6,047	07.10 ～ 08.11	부도임대아파트
14	김 효 진	151-1052	창인1가 197_1	5,260	01.12 ～ 02.04	부도-소재불명
15	이 종 성	177-0280	신동 397_3	3,574	04.05 ～ 04.11	임의경매-비승계
16	조 익 구	134-0969	용안면 석동리 280 (부억)	3,556	09.04.～ 10.04	단순체납
17	양 희 영	165-4220	모현1가 525_2(수영장)	3,517	04.09 ～ 07.02	압류
18	삼 보 판 지	175-0556	팔봉동 제2공단 579(용제)	3,317	09.04 ～ 10.01	임의경매-비승계
19	이 동 명	165-3902	모현1가 268_8	3,144	04.07 ～ 04.11	부도-소재불명
20	윤 성 숙	137-0236	웅포리 831_1(원조 우어회)	2,875	10.04 ～ 10.04	단순체납

3. 상수도 채무 및 상환계획(상환조건, 기간 등)

확인자	:	상수관리과장		안 재 억	ꄫ
작성자	:	상수행정담당		국 승 원	ꄫ

□ 채 무 현 황

(2010. 12. 31. 현재)                                        (단위 : 백만원)

기금명	사업명	발행 년월	발행 총액	이율	기 상환액	잔액	상환 종기	비고
2개기금	3개사업		5,690		2,352	3,338
지역개발기금 (전라북도)	전 주 권 광역상수도	99.07	2,000	4.5	1,800	200	2011.09	연납
	읍면농촌마을확장공사	07.08	3,000	3	0	3,000	2022.08	연납 (5년거치 10년상환)
공공자금 (환경관리 공단)	맑은물공급	97.07	690	변동 금리	552	138	2012.12	분기 (3.02% ~3.89%)

□ 상환계획

◦ 지역개발기금(전라북도)

▸읍면농촌마을확장공사 : 원금 30억중 올해 10억 조기상환

◦ 공공자금(환경관리공단)

▸맑은물공급사업 : 2012년 납부 예정액 전액(68,800천원) 조기상환

◦ 상환시기  :  7월

◦ 매년 예산절감 및 세입증대로 향후 3년 이내 완전상환

4. 유수율 증대를 위한 누수방지사업 추진사항

확인자	:	상수관리과장		안 재 억	ꄫ
작성자	:	요금담당		변 명 숙	ꄫ
작성자	:	누수방지담당		윤 서 용	ꄫ

□ 현      황

○ 년간 총 생 산 량	51,657천톤 (100%)

○ 년간 요금 부과량	35,554천톤  68.8%(유수율)

○ 무     수     량	8,586천톤  16.6%(무수율)

※ 무수량 : 계량기 불감, 수도사업 용수량, 공공수량 등

○ 누     수     량	7,517천톤  14.6%(누수율)

□ 2010년 유수율 제고사업 추진실적

구 분				사업개요	사 업 비 (백만원)	비 고
노 후 관 교 체				5.2㎞	405
누수탐사	옥 내			657건		자체탐사
누 수 처 보 수 등	누수처 보 수	자 체		124건		자체보수
		위 탁		685건	700
	변류 및 상수도 표시못 정비 공사			200여개소	175
블록화 사 업	블록화 구역 유량계 T/M설치공사			6구역	60
노 후 계 량 기 교 체			계	3,265전	71
			자 체	833전	0
			위 탁	2,432전	71

5. 상수도 수질관련 민원(적수발생 포함) 및 처리결과

확인자	:	상수관리과장		안 재 억	ꄫ
작성자	:	급수시설담당		전 종 배	ꄫ
작성자	:	수질실험담당		문 대 은	ꄫ

일 자	내용	발 생 지 역		처리결과	원 인	비고
		지역	건축물명
계			9건
‘10. 3. 8	적수	부송동	우미아파트 푸른솔아파트	적수배출 저수조 청소 사용량 감면	원인불명
‘10. 6. 7	〃	송학동	이리중학교 제일고등학교	적수배출 급식비 등 보상	사용량 증가 등
‘10. 6. 21	〃	영동동 어양동	제일1차아파트 부영1,2차아파트	적수배출 저수조 청소 사용량 감면	사용량 증가 등
‘10. 6.24	〃	마 동	스위트밸리아파트	적수배출, 운반급수 저수조 청소 사용량 감면	사용량 증가 등
‘10. 7. 13	〃	송학동	지안리즈아파트	적수배출 저수조 청소 사용량 감면	사용량 증가 등
‘10. 7. 16	〃	어양동	자이아파트	저수조청소 사용량 감면	사용량 증가 등
‘10. 7. 18	〃	동산동	휴먼시아 2차 우남아파트	저수조청소 사용량 감면	사용량 증가 등
‘10. 7. 21	″	마 동	전원아파트	저수조청소	밸브조작
‘10. 10. 23	″	마 동	시영아파트부근 세탁소	세탁물 탈색비용 보상	원인불명

6. 상수도검침(요금부과포함)에 대한 민원 및 처리결과

확인자	:	상수관리과장		안 재 억	ꄫ
작성자	:	요금담당		변 명 숙	ꄫ

연번	민 원 내 용			처 리 결 과	비 고
	일 자	성 명	내 용
1	2010.05.07	권영인	영등동 휘트니스센터 회원으로 약500여명이 운동을 하고 있으며 전세기간도 남아있고 수도요금도 정상적으로 납부하였는데 건물주가 폐쇄를 의뢰하였다고 시에서 수도를 페쇄해도 되는지	불편을 드린 점 죄송, 건물주의 계량기 폐전신청에 의하여 익산시상수도급수조례 제24조에 따라 처리하였음	시정에바란다 9335
2	2010.05.07	김오천	시 행정이란 개인의 편익을 위한 소도구 역할을 해서는 아니된다 여기며 다수건 소수건 시민에게 피해가 없어야 할텐데, 상식과 책임있는 공익사업을 수행하는 올바른 시정을 기대하며(영등동 휘트니스센터폐전관련)	불편을 드린 점 죄송, 소유주의 계량기 폐전신청에 의하여 익산시상수도급수조례제24조에 따라 처리하였음	시정에 바란다 9339
3	2010.08.05	김동호	미납요금 때문에 단수가 되어 1개월요금만 담당자에게 양해를 구하고 수도요금을 납부하였는데 집을 나간사이에 수도를 단수하였음. 이것은 무단침입이라고 생각됨	그동안 수차에 걸쳐 체납된 상수도 요금을 납부토록 독려하였으나, 3개월 요금을 2010.8.2까지 납부하기로 약속을 하였음 2010.8.4일 1개월 요금만 납부되어 귀댁을 방문 하였는데 이사 간다는 메모지와 함께 문이 열려 있어 규정에 의거 단수처리 하였음.	시정에바란다 9775
4	2010.08.09	김동호	문이 열려 있다 해도 사람이 있어야 말을 하고 단수를 해야 된다고 생각됨.	체납요금으로 인하여 수도가 단수 된다고 그동안 수차례 방문도 하고 유선으로도 통보하였음.	시정에바란다 9789

연번	민 원 내 용			처 리 결 과	비 고
	일 자	성 명	내 용
5	2010.08.10	홍종혁	상수도 요금이 매달 15만원 정도 나오고 있음. 누수가 되는지 계량기가 이상이 있는지 신고하였는데 처리 좀 해주세요	누수여부는 집 내부에서 쓰는 수도꼭지를 모두 잠그고 계량기의 빨간 별모양이 돌아가는지를 보시면 됩니다. 누수는 (859-4414) 계량기 검사는 (859-4413)으로 전화주시면 점검 해드리겠습니다.	상하수도사업단에바란다 219
6	2010.08.10	홍종혁	터무니없는 상수도 요금문의	수도요금이 많이 나온 이유는 누수가 발생한 것으로 검침담당자가 거주하고계신 민원인의 아버님께 누수 검사공사에 대해 충분히 설명 드려 이해하신 사항입니다.	상하수도사업단에바란다 220

7. 상수도 수압관련 민원 및 처리결과 내역

확인자	:	상수관리과장		안 재 억	ꄫ
작성자	:	급수시설담당		전 종 배	ꄫ

발 생 지 역		처 리 결 과	원 인	비고
지역	위 치
팔봉동	원팔봉마을	가압구역 확장으로 수압상승 (2010. 2월 해결)	고지대
	당산마을	소규모 가압장 설치로 수압상승 (2010. 6월 해결)	고지대
	장목마을	전주광역권 상수도와 연결하여 수압상승 (2010. 8월 해결)	고지대
마 동	제2청사 뒤	마동가압장 설치완료 및 가압시행 (2010. 11월 해결)	고지대
남중동	전북기계공고 북부시장 주변	남중가압장 설치완료 및 가압시행 (2011. 5월 해결)	고지대
	대성연립 주변	가압장 보수로 수압상승 (2011. 6월 해결)	고지대
모현동	대림아파트주변	누수처보수하여 수압상승 (2011. 3월 해결)	누 수
	배산사거리 주변	가압장 보수 및 관로정비로 수압상승 (2011. 7월 완료예정)	고지대
부송동	익산청사진 주변	가압시설 설치중 (2011. 8월 완료예정)	고지대

9. 500만원 이상 약품 및 물품구입 현황

확인자	:	상수관리과장		안 재 억	ꄫ
작성자	:	급수시설담당		전 종 배	ꄫ
작성자	:	요금담당		변 명 숙	ꄫ
작성자	:	수질실험담당		문 대 은	ꄫ

(단위 :백만원)

계약일	물 품 명	계 약 액	납 품 자 (계약자)	비 고
	14건	642
1.13	화물차량 구입(2대)	42	조달청 (현대자동차)
1.13	유 량 계	53	조달청 (대덕기술)
1.18	무정전 전원장치	8	조달청 (베스테크)
1.19	응 집 제 (폴리수산화염화황산알루미늄)	194	조달청 (삼구화학)
2. 4	수도계량기보호통	36	조달청 (신우산업)
2.24	직결형 염소투입기 구입	5	백광아이에스티(주)
3.10	수도계량기 대구경	32	조달청 (한국켄트메타)
3.10	수도계량기 소구경	84	조달청 (신우산업외2)
3.19	전자저울 및 증류수제조기 구입	10	DI SCIENCE
3.22	급수차 구입	47	조달청 (현대자동차)
5.17	응 집 제 구입 (폴리수산화염화황산알루미늄)	99	조달청 (삼구화학)
7. 8	신설용계량기	5	조달청 (이천텍)
7. 8	신설용계량기 보호통	18	조달청 (이천텍)
12. 2	계량기보호통	9	조달청 (청수계기)

9. 상수도사업관련 각종 용역 추진사항

확인자	:	상수관리과장		안 재 억	ꄫ
작성자	:	정수생산담당		석 금 산	ꄫ
작성자	:	급수시설담당		전 종 배	ꄫ
작성자	:	누수방지담당		윤 서 용	ꄫ

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요	공사기간	총사업비	시공회사	공정(%)
계	4건		70
2011년 농어촌생활용수 개발사업 실시설계용역	실시설계 L=10km (8개마을)	10.05.10 ～10.07.18	26	(유)장흥건설기술공사	100
신흥정수장 중앙감시제어 설비 교체공사실시설계용역	중앙감시 1식	10.02.16 ～10.04.20	25	(유)중앙기술공사	100
익산시 상수관로 누수탐사 용역	L=5.0km	10.05.26 ～ 10.06.18	10	(유)청우엔지니어링	100
금마 미륵사지 교차로 누수처 보수공사 실시설계용역	실시설계 1식	10.11.17 ～ 10.11.24	9	(주)주한건설 기 술 단	100

하 수 관 리 과

	□		감사자료 과 공통사항
				1.	2010업무성과 및 반성 ……………………………	59
				2.	2010예산집행 및 추진사항………………………	60
				3.	2010년도 행정사무감사시 지적사항에 대한 조치 결과 …	62
				4.	2010년도 상급기관 감사시 지적사항 조치 결과 …	66
				5.	시정질문에 대한 조치 결과 ……………………	67
				6.	주요사업 조서(3천만원 이상) …………………	68
				7.	2010년도 각종 민원(진정･건의･청원 등) 접수 처리내역 …	70
				8.	기금 운용 관련 …………………………………	71
				9.	위원회(자문위원회포함) 운영 관련 ……………	71
				10.	용역사업 관련 …………………………………	72
				11.	각종 민간사회단체 보조금지원 관련 ………	73
				12.	인․허가 민원관련 ………………………………	73
				13.	각종공사 설계 변경 상황 ………………………	75
				14.	건설공사 집행 상황(3천만원 이상) ……………	76
				15.	민간에 대한 보조금 집행 내역 …………………	78
				16.	국․도비 보조사업 집행현황(1억원이상) ………	79
				17.	명시 및 사고이월사업비 집행 내역 ……………	80
				18.	예산전용 사항 및 예비비 집행 현황 ……………	81
				19.	공사 준공기한 연장 내역 ………………………	82
				20.	국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황 …	82
				21.	국․도비 반납 현황 ……………………………	82
				22.	2010년도 계획사업중 미착공사업 현황 ………	83
				23.	2010년도 계획사업중 유보 및 취소된 사업현황 …	83
				24.	2010년도 이월사업중 유보 및 취소된 사업 ……	83
				25	2010년도 예산편성후 전액 미집행 내역 ………	84
				26.	소송 사건 현황 …………………………………	84
				27.	시홈페이지에서 접수된 민원처리 현황 …………	85

하 수 관 리 과

	□		감사자료 과 요구사항
				1.	하수도사업 공기업 운영 사항 ……………………	89
				2.	하수도요금 부과징수 및 체납액 현황………………	91
				3.	하수도사업 채무 및 상환계획(상환조건, 기간 등)…	93
				4.	하수관거 임대형 민자사업(BTL) 추진현황………	94
				5.	익산처리구역(제2공구)하수관거 정비사업 추진현황	95
				6.	공공하수처리시설 설치사업 추진현황 ……………	96
				7.	하수처리 방류수 재이용사업 추진현황 ……………	97
				8.	유천 생태습지 및 자연형하천 복원사업 추진현황 …	98
				9.	합류식하수도월류수(CSOs)처리시설 설치사업추진현황	99
				10.	공공하수처리장 총인처리시설 설치사업 추진현황…	100
				11.	개인하수처리시설 수질오염 저감 추진현황………	101
				12	하수슬러지 처리시설 설치사업 추진현황…………	102
				13.	하수도사업관련 각종 용역 추진사항…………………	103

감사자료 과 공통사항

1. 2010업무성과 및 반성

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하수행정담당		이 평 구	ꄫ

□ 성      과

◦ 하수처리구역 오․우수 분리사업 정상 추진으로 쾌적한 생활환경 조성

▸ BTL 사업 및 재정사업 추진 정비 : 관거정비 40.9km

▸ 06 BTL 총 공정 : 95%

◦ 여산 공공하수처리장 준공으로 인근 하천 및 금강수계 수질 개선

▸ 설치규모 : 처리시설 600㎥/일, 차집관로 6.4km

◦ 자체 설계단 운영으로 하수관거사업 조기 발주 및 지역경제 활성화

▸ 관거정비 36건, 152개소 13.1km

▸ 자체설계단 운영으로 공사비 절감 : 100백만원

◦ 집중호우 대비 상습 침수지역 하수도 개량공사 시행

▸ 신흥동 수도산공원 일원 침수지역 등 하수도 개량 및 준설 : 43.6km

◦ 배산공원내 공중화장실 개보수로 쾌적한 편익시설 제공

▸ 발효식 → 수세식으로 리모델링 완료하여 악취 민원 해소

◦ 하수도 생활민원 신속 처리로 주민 불편 해소

▸ 하수도 준설, 맨홀 보수, 배수로 정비 등

※ 저탄소녹색성장평가 우수기관선정(전주지방환경청장), 고객만족으뜸부서선정(우수)

□ 반      성

◦ 하수도 공사시 각종 지하시설물 조사미흡에 따른 공사지연으로 주민 불편 발생

▸ 지하 매설물 사전조사 철저 및 민원 성실 대응으로 공사시 주민불편최소화

2. 2010예산집행 및 추진사항

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하수행정담당		이 평 구	ꄫ

□ 세      입

(단위 : 백만원)

과 목		예 산 액	세 입 액	비율(%)	비 고
합 계		53,655	57,409	107.0
수익적 수 입	소 계	11,489	12,195	106.1
	사 용 료 수 입	5,279	5,857	110.9
	기 타 영 업 수 익	491	259	52.7
	수 입 이 자 및 배 당 금	1,298	1,342	103.4
	타회계전입금수익	4,391	4,539	103.4
	기 본 재 산 임 대 수 익	3	3	100.0
	잡 수 익	27	195	722.2
자본적 수 입	소 계	42,166	45,214	107.2
	시설분담금	867	2,678	308.9
	타회계건설보조금	14,406	15,373	106.7
	기타자본적수입	26,893	27,163	101.0

□ 세     출

(단위 : 백만원)

과 목		예 산 액	집 행 액	비율(%)	비 고
합 계		53,655	26,127	48.7
수익적지 출	소 계	16,003	12,542	78.4
	관 거 비	583	518	88.9
	펌 프 장 비	95	93	97.9
	처 리 장 비	10,334	10,139	98.1
	일 반 관 리 비	1,890	1,742	92.2
	지 급 이 자	83	50	60.2
	예 비 비	3,018		0.0
자본적지 출	소 계	37,652	13,585	36.1
	가 동 설 비 자 산	15,423	10,847	70.3
	비가동설비자산	1,269	80	6.3
	고정부채상환금	179	179	100.0
	민 간 자 본 이 전	3,244	2,479	76.4
	기타자본적지출(충당금)	10,000		0.0
	예 비 비	7,537		0.0

3. 2010년도행정사무감사시 지적사항에 대한 조치결과

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하수행정담당		이 평 구	ꄫ
작성자	:	하수시설담당		조 규 석	ꄫ
작성자	:	하수운영담당		정 원 섭	ꄫ
작성자	:	생활하수담당		송 창 률	ꄫ

○ 총 13건 / 완료 13건

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과	비고
1	◦우리시 재정자립도도 열악한데 하수도요금부과징수율이 83.45%로 저조하므로 체납사유 분석을 철저히 하여 고질 체납자에 대하여는 징수책임 목표관리제 등을 운영하여 개인별 징수 책임목표액을 달성할 수 있도록 하여 효율성 있는 하수도 행정이 되도록 하수도요금 징수에 특단의 조치를 강구하기 바람.	•강력한 징수(매월 독촉고지,독촉안내문 직접 전달, 면담, 전화독촉) 및 결손처분등으로 체납액을 줄이겠음.
2	◦하수도 관거 공사시 공사감리가 제대로 이루어지지 않아 부실공사가 우려되니 철저한 지도감독을 하여 주시고 공사중 안내 입간판을 적의 장소에 설치하여 운전자에게 불편이 없도록 하기 바라며 공사 후 복구가 제대로 되지 않아 미관상 좋지 않고 통행에 지장을 주므로 시민의 불편을 최소화하기 바람.	•공사시 설치하는 안내표지판은 차량통행불가, 공사중, 불편사항신고 등으로 현장상황에 맞게 구분하여 설치하고 있으며, 특히 차량통행 차단시에는 운전자에 불편을 주지 않도록 입구에 설치 하겠음.

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과	비고
3	◦유천생태습지 및 자연형 하천복원사업은 시장님 공약사업이고 주민 민원에 대한 보상차원의 숙원사업이므로 하수처리 단계 라는 생각을 하지 말고 문화적인 사업이 될 수 있도록 인근 주민의 의견수렴을 꼭 반영하여 원래 목적과 취지에 맞도록 사업을 추진하기 바람.	•주민 공청회 및 보상심의회를 개최하여 인근 주민의 의견반영에 만전을 기하겠음.
4	◦평화동 3펌프장 악취발생으로 인근 지역 주민의 악취 민원이 많은데 조속히 악취발생을 최소할 수 있도록 악취저감 대책을 수립하기 바람.	•3펌프장 악취관련 민원을 최소화 할 수 있도록 악취방지시설 운영계획을 수립시행하여 악취저감에 철저를 기하겠음.
5	◦현재 마을 하수도 시설이 22개인데 앞으로 2025년까지 하수도 기본계획에 의거 324개의 마을 하수도 시설을 계획하고 있는데 마을 하수도사업을 마을별로 설치 운영하게 되면 유지관리비 등 많은 예산이 수반되어 재정적 부담이 되므로 권역별로 효율적으로 확충하는 방안을 강구하기 바람.	•하수도정비기본계획 세부추진계획을 검토하여 마을하수처리장이 권역별로 효율적으로 확충할 수 있도록 관련부처와 협의하여 시행토록 하겠습니다.

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과	비고
6	◦악취와 관련하여 많은 민원이 발생하므로 하수처리시설 악취방지사업 예산을 확보해서 조속히 추진하기 바라며 하수관거 BTL사업을 추진할 때 기존 관 등을 재활용하여 사용하는 방안을 검토하기 바람.	•악취방지사업 부족예산을 2011년 본예산에 확보하여 악취방지 사업을 조속히 추진하겠으며, 하수관거 사업을 추진시 기존시설을 최대한 활용하는 방안을 검토하여 설계에 반영토록 하겠습니다
7	◦익산시하수처리장 슬러지는 중금속이 함유되어 있어 2011년부터 실시되는 중금속함유 하수슬러지 해양투기 금지에 해당되고 2012년부터는 전면 해양투기가 금지됨에 따라 하수슬러지 처리문제가 크게 대두되므로 슬러지 직매립, 소각, 재활용 등 다각적인 방법을 조속히 강구하여 사전 대처하기 바람.	•2011년 해양투기 금지에 따른 슬러지 처리대책을 수립 제출하도록 민간위탁사업자에게 문서로 기 통보하였으며, 관내 재활용 업체등의 현황을 파악 사전 협의로 슬러지 처리대책에 만전을 기하겠습니다.
8	◦마을 하수도 시설 방류수 수질은 BOD, COD 기준엔 적합한데 녹조, 적조 등 해양오염이나 수질오염을 일으키는 질소와 인 처리 기준에는 기존 처리공법으로는 부적합하므로 앞으로 신규 마을 하수도 시설을 할 때 이를 신중히 고려하여 추진하기 바람.	•마을하수도 신규시설 설치시 질소와 인처리 기준에 적합한 시설이 설치 될 수 있도록 공법 등 을 선정시 고려하여 추진하겠습니다.

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과	비고
9	◦마을 하수도 방류수 수질검사를 기준보다 초과하여 하고 있는 바 이는 예산낭비로 법적기준에 맞게 실시하기 바람.	•민간위탁업체의 협조로 자체 수질검사를 시행함으로 예산 낭비는 없으나, 앞으로는 법적 기준에 맞게 시행토록 하겠습니다.
10	◦익산 하수처리시설의 하수슬러지 함수율이 높은데 이는 슬러지 처리비용 상승을 수반하게 되어 재정적 부담이 되므로 철저한 함수율 관리를 하기 바람.	•슬러지 함수율 제고를 위해 송풍기 1대 및 이동식 원심탈수기 1대 추가 배치완료 하였으며, 앞으로도 슬러지 함수율을 매월 점검하여 지속적으로 함수율 관리에 철저를 기하겠습니다.
11	◦지하수 수질 검사를 인․허가 시점에만 실시하고 이후 수질 검사를 소홀히 하는 것은 문제가 있으니 정해진 주기별로 수질 검사를 실시하고 수질 부적합 시설에 대하여는 폐쇄조치하기 바라며 또한 지하수 인․허가에 대한 5년 단위 재연장도 관리를 철저히 하기 바람.	•지하수에 대한 관리 차원으로 불법지하수시설에 대하여 벌칙 면제 후 자진신고로 양성화 진행 중이며 그 후에도 지하수관리에 만전을 기하겠음 (자진신고기간:2010.09.01～2011.02.28)
12	◦악취 저감을 위해 익산하수처리시설 음식물 폐수, 분뇨처리장 폐수, 매립장 침출수, 생활하수의 농축조 및 슬러지 처리시설에 대한 보강계획을 다각적으로 검토하기 바람.	•익산처리장 악취방지대책 추진계획을 수립하여 주변 악취측정을 주기적으로 시행관리하고, 처리시설 보수보강등 체계적인 유지관리로 악취저감에 철저를 기하겠습니다.
13	◦북부하수처리장 주민숙원사업(계문동, 황등면) 미확보예산을 내년에 적극 반영하기 바람.	•북부하수처리장 주민숙원사업(계문동, 황등면) 미확보예산을 내년에 반영하도록 노력 하겠음

4. 2010년도상급기관 감사시 지적사항 조치결과

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하수행정담당		이 평 구	ꄫ
작성자	:	하수시설담당		조 규 석	ꄫ
작성자	:	하수운영담당		정 원 섭	ꄫ
작성자	:	생활하수담당		송 창 률	ꄫ

연번

시정․개선사항

조치(처리)결과

비고

1

◦익산처리구역(2공구) 하수관거정비사업    추진 소홀

▸하수관거 설치에 따라 실제 지장물매달기        설치를 시행하지 않고 준공하였으므로

22,346천원상당을 회수 또는 잔여        공사비에서 감액

•설계변경(2011.04.26)

감액 22,346천원

도종합감사

2

◦익산처리구역(2공구) 하수관거정비사업    추진 소홀

▸인화동 목천대로 구간(1,100m)의 자전거        도로는 경제성, 평탄성, 내구성등을      고려하여 자전거도로에 적합한 포장       공법으로 변경 시행, 포장공법 변경에      따른 51,844천원 상당에 대해서는 감액

•설계변경 및 관급자재(점토블럭)

감51,700천원 시행(2010.11.05)

도종합감사

3

◦품질관리시험 정산 소홀

▸부당하게 과다 지급된 건설공사

품질관리시험비 2,989천원을 회수

공 사 명	미정산액	비 고
계	2,989천원
금마처리구역 하수관거정비	1,900천원	(유)원탑종합건설 대표 이재선
익산처리구역 (2공구)2차분	902천원	호원건설(주) 대표 이윤범
여산하수종말 처리장시설	187천원	우진건설주식회사 대표 김종원

•품질관리시험비 2,989천원 회수

도종합감사

5. 시정질문에 대한 조치결과

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하수행정담당		이 평 구	ꄫ

▣ 제목 : 하수도 특별회계 건전운영

◦ 일    시 : 2010. 12. 23(화) 10:04

◦ 질문의원 : 손문선

▣ 질 문 요 지

◦ 2011년도 하수도특별회계 예산은 627억원이며, 건전재정 운영에 대하여?

ꋻ하수관리과 세출중 자체자원은 9%이며 의존재원중 일반회계에서 지원하는         예산이 총사업비의 20%를 차지하고 갈수록 규모가 커지고 있음

ꋻ하수관거정비 민자형 임대사업(BTL) 상환비등 유지관리하는데 소요되는         예산이 연251억원이며, 유천생태습지자연형복원사업등 하수처리와 관련하여         계속해야 할 사업이 많아 시비부담이 갈수록 높아짐

▣ 답변요지

◦ 하수도 특별회계 부분은

ꋻ우리시 하수도사용료 현실화 율은 26.1%에 불과하며 어느 시기에 의회와        협의하여 현실화시켜야 할 상황이라 판단함

ꋻ앞으로는 민간사업 및 재정사업 추진시 철저한 검증을 거쳐 반드시 필요한          사업만을 시행하여 일반회계 및 특별회계 예산이 최소 투자될 수 있도록 최선을         다하겠음

▣ 조치결과

◦ 하수도사용료 현실화

ꋻ금년 하반기중 경기가 호전되면 하수도사용료 현실화(30%정도)추진

◦ 현재 추진하고 있는 계속사업 마무리와 법적의무사업 및 하수도 정비사업등         꼭 필요한 최소한의 사업만 시행하고 신규사업 지양

6. 주요사업조서(3천만원 이상)

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하수시설담당		조 규 석	ꄫ
작성자	:	하수운영담당		정 원 섭	ꄫ
작성자	:	생활하수담당		송 창 률	ꄫ

(단위 : 백만원)

사 업 명	공 사 개 요	공사기간	사업비	시공회사	공정율 (‘11.06월)
21건			8,612
익산처리구역(제2공구)하수관거정비시설공사(2차분)	L=5.8Km	2010.01.12 ～2010.06.21	2,044	호원건설(주)	100
침수지역하수도 개량공사(신흥동 수도산공원일원)	L=426.5m	2010.02.28 ～2010.07.26	521	우리건설	100
상반기 하수도 동부권역 기계준설공사(단가계약)	준설Q=750㎥	2010.02.09 ～2010.06.09	79	(유)태정건설	100
중앙동 익산역 일원 하수도기계준설공사(단가계약)	준설Q=1,100㎥	2010.02.26 ～2010.04.27	87	(유)한양기업사	100
춘포면 창평마을 하수도 정비공사	L=146.4m	2010.03.03 ～2010.04.16	62	(주)원광산업개발	100
오산지구 마을하수도 정비 시설공사(2차분)	시설용량 490㎥/일 차집14.6Km	2010.03.02 ～2010.12.10	1,663	(유)한백종합건설	100
삼기면(검지외 12개소)하수도 설치공사	L=1,194m	2010.03.08 ～2010.06.22	52	(유)우성건설	100
익산처리구역(제1공구)하수관거정비시설공사(3차)	L=14.5Km	2010.03.10 ～2011.03.19	2,257	부일건설(주)	100
왕궁면 흥암리 하수도정비공사	L=626.5m	2010.03.22 ～2010.10.22	113	(주)태흥	100

사 업 명	공 사 개 요	공사기간	사업비	시공회사	공정율 (‘11.06월)
여산면 독양마을 하수도 정비공사	L=193m	2010.03.24 ～2010.06.03	31	(유)지원	100
춘포면 사천마을 하수도 정비공사	L=374m	2010.04.07 ～2010.05.27	30	(유)오상건설	100
왕궁면 신기외5개마을 하수도 정비공사	L=574m	2010.04.07 ～2010.06.14	31	(유)팔덕건설	100
금강동 초곡마을 하수도 정비공사	L=312.5m	2010.04.09 ～2010.05.26	31	(유)광원건설	100
여산면 용기마을외 1개소 하수도 정비공사	L=544m	2010.04.13 ～2010.05.27	32	(주)신토성건설	100
배산공원 공중화장실 리모델링공사		2010.04.14 ～2010.06.07	74	(유)대산이엔씨	100
춘포면 안수마을외1개소 하수도 정비공사	L=217m	2010.06.11 ～2010.09.16	54	(주)디엠건설	100
용안면 용안주유소앞 외 1개소 하수도 정비공사	L=277m	2010.06.11 ～2010.11.01	63	(주)영웅건설	100
하반기 하수도기계준설공사 (단가계약)	흡입준설 Q=750㎥	2010.08.25 ～2010.10.18	88	(합)대진	100
익산처리구역(2공구)하수관거정비시설공사(3차)	L=1.4Km	2010.09.14 ～2011.03.09	995	호원건설(주)	100
함열공공하수처리장 총인 처리시설 설치공사(1차)	건축공사 1식 시설용량1,100㎥/일	2010.12.28 ～2011.04.14	210	성우건설(주)	100
여산공공하수처리장 총인 처리시설 설치공사(1차)	건축공사 1식 시설용량600㎥/일	2010.12.13 ～2011.03.29	95	(주)신일	100

7. 2010년도 각종 민원(진정,건의,청원 등)접수 처리내역

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하수시설담당		조 규 석	ꄫ
작성자	:	하수운영담당		정 원 섭	ꄫ
작성자	:	생활하수담당		송 창 률	ꄫ

건 명	내 용	진정인	조치사항	처 리 결 과
계	5건
공사소음진동민원 (‘10.4.27)	◦동산동 343-19 하수도 공사로 인한 굴착 소음	지연호	완료	•대형 굴착작업 공종 조기 마무리 및 방음벽 설치
침수피해대책요청 (‘10.08.23)	◦해마다 침수피해 대책요구	함열제일아파트주민	2010.08.31 현지 확인	•2011본예산 확보 현재 공사중
하수관거공사(BTL)중 담장 균열(‘10.10.05)	◦남중동 544-1 소라연립 오수관(BTL) 공사로 담장 균열	김용보	완료	•담장 균열 보수
하수관거공사민원 (‘10.10.18)	◦인화동1가 42 굴착 공사로 건물 기둥 붕괴 및 균열	권길성	완료	•기둥 및 균열 보수
하수관거공사(BTL)중 담장 균열(‘10.10.18)	◦남중동 529-1 형제연립 오수관(BTL)공사중 담장 균열	권연주	완료	•담장 재 축조

8. 기금 운용 관련

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하수행정담당		이 평 구	ꄫ

해  당  없  음

9. 위원회(자문위원회 포함) 운영 관련

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하수행정담당		이 평 구	ꄫ
작성자	:	하수시설담당		조 규 석	ꄫ
작성자	:	하수운영담당		정 원 섭	ꄫ
작성자	:	생활하수담당		송 창 률	ꄫ

해  당  없  음

10. 용역사업 관련

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하수시설담당		조 규 석	ꄫ
작성자	:	하수운영담당		정 원 섭	ꄫ
작성자	:	생활하수담당		송 창 률	ꄫ

□ 용역비 미집행 사업 추진현황 : 없음

□ 용역사업 추진현황

(단위 : 백만원)

용역의뢰건명	용역업체	용역비	용 역 계약방법	비 고
7 건		1,293
익산처리구역(2공구)하수관거 수밀 및 CCTV조사용역(2차분)	(유)전일건설	55	공개견적	수밀 및 CCTV 조사용역
익산처리구역(2공구)하수관거건설 폐기물처리용역(2차분)	(주)서원산업개발	137	공개견적	폐기물 처리용역
왕궁면 흥암리 하수도정비공사 폐기물처리용역	(유)해동환경	28	전자견적	폐기물 처리용역
함열 및 여산공공하수처리장 총인처리시설 설치공사 실시설계용역	(주)건일	48	제한경쟁	실시설계
익산처리구역(2공구)하수관거건설 폐기물처리용역(3차분)	(주)서원산업개발	11	공개견적	폐기물 처리용역
익산처리구역2-1분구 하수관거정비사업실시설계	(주)주한건설기술단	48	전자견적	실시설계
유천생태습지 및 생태하천복원사업 기본 및 실시설계용역	(주)삼안	966	지명경쟁	실시설계

□ 용역사업중 사전기술심사를 하여 참가자격 제한사례 : 없음

□ 각종 용역사업중 실제사업에 적용시키지 못하고 사장하고 있는 용역현황 : 없음

□ 각종 용역사업중 사업중단으로 용역을 적용시키지 못한 사례 : 없음

11. 각종 민간사회단체 보조금지원 관련

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하수행정담당		이 평 구	ꄫ

해  당  없  음

12. 인․허가 민원관련

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	생활하수담당		송 창 률	ꄫ

민원신고명	민원인	처리결과	내 용	비고
배수설비설치신고	최종철	완료	▸배수계획도 정정
정화조 설치 신고	농업기술원	완료	▸배수계획도면 누락
지하수개발이용신고	국도화학	완료	▸영양조사서 보완
정화조 준공 신고	고필영	완료	▸준공검사신청서 누락
배수설비설치신고	이영주	완료	▸배수계획도면 정정
정화조 설치 신고	최상성	완료	▸설계∙시공업자 누락
배수설비설치신고	지연호	완료	▸배수계획도면 누락

□  각종 민원서류중 보완 요구 및 반려현황 :

민원신고명	민원인	처리결과	내 용	비고
정화조 설치 신고	유성용	완료	▸설계∙시공업자 누락
정화조 설치 신고	권오자	완료	▸정화조 용량 검토서 누락
배수설비설치신고	이연실	완료	▸배수설비 및 정화조 설치신고 서류 누락
공중화장실설치신고	태성산업	완료	▸도면 누락
지하수개발이용신고	스파랜드	완료	▸영양조사서 보완
정화조 설치 신고	이숙자	완료	▸처리시설 설치신고 변경 (정화조 설치 ➪ 오수처리시설)
배수설비설치신고	김진태	완료	▸정화조 설치신고 서류 누락
배수설비설치신고	한성테크	완료	▸배수설비 설치신고서류 누락

□  각종 민원서류중 법령기간 초과처리건수 : 없음

□  민원 처리업무의 감사실적 및 결과 : 없음

□  불허, 취하 민원 현황 및 내용과 사유

○ 불허 민원 현황 : 없음           ○ 취하 민원 현황 : 3 건

민원신고명	민원인	사 유	비고
지하수개발이용신고	최승룡	▸자진취하
지하수개발이용신고	박무용	▸자진취하
굴착행위변경신고	박오덕	▸자진취하

13. 각종공사 설계변경 상황

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하수시설담당		조 규 석	ꄫ
작성자	:	하수운영담당		정 원 섭	ꄫ
작성자	:	생활하수담당		송 창 률	ꄫ

(단위 : 백만원)

날 짜	사 업 명	예산액	계 약 액			계약자	공사기간	변경사유
			당초	변경	증․감
	7건	5,386	5,909	6,227.3	318.3
2010. 05.10	익산처리구역(제1공구)하수관거정비시설공사(3차)	2,257	2,257	2,900	증643	부일건설(주)	2010.03.10 ～2011.03.18	동산교추진물량3차분으로 변경
2010. 06.09	왕궁면 신기외5개마을 하수도정비공사	36	31	30	감1	(유)팔덕건설	2010.04.07 ～2010.06.14	설계변경
2010. 06.11	용안면 용안주유소앞외 1개소 하수도정비공사	72	63	59	감4	(주)영웅건설	2010.06.11 ～2010.11.01	현장여건양오 오우수관시공감
2010. 06.14	낭산면 마산외 6개마을 하수도정비공사	27	24	23	감1	(유)한성건설	2010.03.31 ～2010.06.16	설계변경
2010. 07.06	침수지역하수도 개량공사(신흥동 수도산공원일원)	608	521	606	증85	우 리 건 설	2010.02.28 ～2010.07.26	시설물안전성확보
2010. 08.16	왕궁면 흥암리 하수도정비공사	129	113	112.3	감0.7	(주)태흥	2010.03.22 ～2010.10.22	설계변경
2010. 12.21	익산처리구역(제1공구)하수관거정비시설공사(3차)	2,257	2,900	2,497	감403	부일건설(주)	2010.03.10 ～2011.03.18	사유지 제외

14. 건설공사 집행 현황(3천만원 이상)

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하수시설담당		조 규 석	ꄫ
작성자	:	하수운영담당		정 원 섭	ꄫ
작성자	:	생활하수담당		송 창 률	ꄫ

(단위 : 백만원)

사 업 명	공 사 개 요	공사기간	사업비	시공회사	공정율 (‘11.06월)
21건			8,612
익산처리구역(제2공구)하수관거정비시설공사(2차분)	L=5.8Km	2010.01.12 ～2010.06.21	2,044	호원건설(주)	100
침수지역하수도 개량공사(신흥동 수도산공원일원)	L=426.5m	2010.02.28 ～2010.07.26	521	우리건설	100
상반기 하수도 동부권역 기계준설공사(단가계약)	준설Q=750㎥	2010.02.09 ～2010.06.09	79	(유)태정건설	100
중앙동 익산역 일원 하수도기계준설공사(단가계약)	준설Q=1,100㎥	2010.02.26 ～2010.04.27	87	(유)한양기업사	100
춘포면 창평마을 하수도 정비공사	L=146.4m	2010.03.03 ～2010.04.16	62	(주)원광산업개발	100
오산지구 마을하수도 정비 시설공사(2차분)	시설용량 490㎥/일 차집14.6Km	2010.03.02 ～2010.12.10	1,663	(유)한백종합건설	100
삼기면(검지외 12개소)하수도 설치공사	L=1,194m	2010.03.08 ～2010.06.22	52	(유)우성건설	100
익산처리구역(제1공구)하수관거정비시설공사(3차)	L=14.5Km	2010.03.10 ～2011.03.19	2,257	부일건설(주)	100
왕궁면 흥암리 하수도정비공사	L=626.5m	2010.03.22 ～2010.10.22	113	(주)태흥	100

사 업 명	공 사 개 요	공사기간	사업비	시공회사	공정율 (‘11.06월)
여산면 독양마을 하수도 정비공사	L=193m	2010.03.24 ～2010.06.03	31	(유)지원	100
춘포면 사천마을 하수도 정비공사	L=374m	2010.04.07 ～2010.05.27	30	(유)오상건설	100
왕궁면 신기외5개마을 하수도 정비공사	L=574m	2010.04.07 ～2010.06.14	31	(유)팔덕건설	100
금강동 초곡마을 하수도 정비공사	L=312.5m	2010.04.09 ～2010.05.26	31	(유)광원건설	100
여산면 용기마을외 1개소 하수도 정비공사	L=544m	2010.04.13 ～2010.05.27	32	(주)신토성건설	100
배산공원 공중화장실 리모델링공사		2010.04.14 ～2010.06.07	74	(유)대산이엔씨	100
춘포면 안수마을외1개소 하수도 정비공사	L=217m	2010.06.11 ～2010.09.16	54	(주)디엠건설	100
용안면 용안주유소앞 외 1개소 하수도 정비공사	L=277m	2010.06.11 ～2010.11.01	63	(주)영웅건설	100
하반기 하수도기계준설공사 (단가계약)	흡입준설 Q=750㎥	2010.08.25 ～2010.10.18	88	(합)대진	100
익산처리구역(2공구)하수관거정비시설공사(3차)	L=1.4Km	2010.09.14 ～2011.03.09	995	호원건설(주)	100
함열공공하수처리장 총인 처리시설 설치공사(1차)	건축공사 1식 시설용량1,100㎥/일	2010.12.28 ～2011.04.14	210	성우건설(주)	100
여산공공하수처리장 총인 처리시설 설치공사(1차)	건축공사 1식 시설용량600㎥/일	2010.12.13 ～2011.03.29	95	(주)신일	100

15. 민간에 대한 보조금 집행 내역

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하수시설담당		조 규 석	ꄫ

(단위 : 백만원)

보조사업자	사 업 명	사업개요	사업비	비 고
6건			419
황방경로당	황등황방경로당외 2개소 기능보강	기능보강	6
건덕정	황등건덕정기능보강	기능보강	7
진성, 태경	진성아파트,태경빌라기능보강	건물도색	21
삼거마을	케이볼장신축	게이트볼장신축	100
신곳마을	경로당신축	경로당신축	95
내곳마을	노인정신축	노인정신축	190

16. 국․도비 보조사업 집행현황(1억원 이상)

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하수시설담당		조 규 석	ꄫ
작성자	:	하수운영담당		정 원 섭	ꄫ

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업 개요	사업 기간	2010년 예산액					집행액	비고
			계	국비	도비	시비	민자
6건			9,606	6,650	148	2,808		8,825
익산처리구역(1공구) 하수관거 정비사업	L=14km	2008.03 ~2011.12	2,680	1,876	0	804		2,680
익산처리구역(2공구) 하수관거 정비사업	L=17.5km	2009.01 ~2011.12	4,230	2,961	0	1,269		4,230
왕궁특수지역마을하수처리시설	490㎥/일 차집관로 L=43.2km 456가구	2009.01 ～2012.12	93	65	0	28		93
함열공공하수처리장 총인처리시설 설치공사	6,000㎥/일	2010.12. ～2011.04	374	187	93	94		374
여산공공하수처리장총인처리시설 설치공사	600㎥/일	2010.12 ～2011.04	372	261	55	56		372
오산지구마을하수처리장	490㎥/일 차집관로 L=22km 427가구	2007.01 ～2011.12	1,857	1,300		557		1,076

17. 명시 및 사고이월사업비 집행내역

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하수시설담당		조 규 석	ꄫ
작성자	:	하수운영담당		정 원 섭	ꄫ

(단위:백만원)

사 업 명	사업개요	공사기간	사업비	이월액	공정율 (‘11.6월)	비고
13건			6,478	2,568
폭우등침수지역하수도개량등	L=2,356m	2009.06.26~2010.03.31	1,999	640	100%	명시이월
함열읍부촌․중촌․정동마을오수관거설치	오수관L=3,423m 배수설비:97개소	2009.10.26~2010.06.23	772	739	100%	명시이월
여산하수처리장 주민숙원사업	노인회관:208㎡ 전기․통신:1식	2009.10.12~2010.06.09	346	286	100%	명시이월
읍면동하수도시설공사	하수관L=1,250m	2009.12.21~2010.05.30	1,257	163	100%	사고이월
여산하수처리장 주민숙원사업	노인회관기초공사 L=208㎡ 포장및하수도공사1식	2009.10.26~2010.06.23	179	1	100%	사고이월
북부하수처리장부근 계문동주민숙원사업(시설비)	양동마을 도로확포장 L=620m, B=7m	2008 ～2011	555	134	0% (토지매입중)	사고 이월
북부하수처리장부근 주민숙원사업	연립도색 등	2008 ～2011	270	43	50% (보조사업선정중)	사고 이월
금마하수처리장부근 주민숙원사업(시설비)	주민휴식공간조성 A=9,566㎡	2008 ～2010	500	62	100%	사고 이월

사 업 명	사업개요	공사기간	사업비	이월액	공정율 (‘11.6월)	비고
북부하수처리장 진입로 확포장 토지매입(원신기마을)(시설비)	도로확포장 L=835m B=6m	2008 ～2011	300	200	0% (토지매입중)	사고 이월
금마하수처리장 부근 주민숙원사업(민간자본보조)	경로당 1동	2008 ～2010	300	300	100%	사고 이월

18. 예산전용 사항 및 예비비 집행현황

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하수행정담당		이 평 구	ꄫ

□ 예산전용 사항

해  당  없  음

□ 예비비 집행현황

(단위:백만원)

예산과목	예산액	지출액	잔 액	지출내역	비고
하수도사업비용, 예비비	3,047	29	3,018	ꋻ처리장비, 공공운영비 ･여산하수종말처리장 지하 저류조시설 수해복구공사 - 29백만원	시 비 부담금
자본적지출, 예비비	7,660	123	7,537	ꋻ구축물, 시설비 ･여산하수도 수해복구공사 - 122백만원	시 비 부담금
				ꋻ구축물, 시설부대비 ･여산하수도 수해복구공사 - 1백만원

19. 공사 준공기한 연장 내역

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하수시설담당		조 규 석	ꄫ
작성자	:	하수운영담당		정 원 섭	ꄫ

사 업 명	계약자	당 초 공사기간	변 경 공사기간	준공기한 연장사유
익산처리구역(1공구) 하수관거 정비사업	부일건설	10.3.10 ~ 10.12.22	10.3.10 ~ 11.2.18	지질변화 및 도시계획도로 용지미확보로 공기연장

20. 국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액  반납한 예산현황

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하수행정담당		이 평 구	ꄫ

해  당  없  음

21. 국․도비 반납 현황(항목별 반납사유 명시)

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하수시설담당		조 규 석	ꄫ
작성자	:	하수운영담당		정 원 섭	ꄫ

해  당  없  음

22. 2010년도 계획사업중 미착공사업 현황

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하수시설담당		조 규 석	ꄫ
작성자	:	하수운영담당		정 원 섭	ꄫ

해  당  없  음

23. 2010년도 계획사업중 유보 및 취소된 사업현황

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하수시설담당		조 규 석	ꄫ
작성자	:	하수운영담당		정 원 섭	ꄫ
작성자	:	생활하수담당		송 창 률	ꄫ

해  당  없  음

24. 2010년도 이월사업중 유보 및 취소된 사업

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하수시설담당		조 규 석	ꄫ
작성자	:	하수운영담당		정 원 섭	ꄫ
작성자	:	생활하수담당		송 창 률	ꄫ

해  당  없  음

25. 2010년도 예산편성후 전액 미집행 내역

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하수행정담당		이 평 구	ꄫ
작성자	:	하수시설담당		조 규 석	ꄫ
작성자	:	하수운영담당		정 원 섭	ꄫ
작성자	:	생활하수담당		송 창 률	ꄫ

해  당  없  음

26. 소송 사건 현황

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하수행정담당		이 평 구	ꄫ
작성자	:	하수시설담당		조 규 석	ꄫ
작성자	:	하수운영담당		정 원 섭	ꄫ
작성자	:	생활하수담당		송 창 률	ꄫ

해  당  없  음

27. 시 홈페이지에서 접수된 민원처리 현황

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하수시설담당		조 규 석	ꄫ
작성자	:	하수운영담당		정 원 섭	ꄫ
작성자	:	생활하수담당		송 창 률	ꄫ

건 명	내 용	진정인	조치사항	처 리 결 과
	6건
중앙동 도로사정 (10.4.8)	◦중앙초등학교 후문쪽 임시포장구간의 노면 상태가 안좋고 아스팔 트 떨어진 부분 보수 요청	김태환	2011년 7월중 포장 예정	•아스팔트의 떨어진 부분은 즉시 보수하였으며, 배수설비 완료후 포장예정 답변
누구를 탓할까요? (10.4.27)	◦평화동 공구상가앞 하수관 거 공사로 인하여 주차 할 있는 공간의 부족으로 큰 도로변 주차공간 확보 및 빠른 시일내에 1차 포장 요망	임세혁	완료	•2010년 5월초 포장 완료
인화동 이일여고 도로포장에 대해 (10.7.10)	◦이일여고앞 도로의 하수관 거공사로 인하여 노면의 포장불량으로 인하여 불편	이경화	2011.7월중 포장 예정	•배수설비공사를 완료후 포장계획 예정 답변
하수도막힘으로 물역류(‘10.8.26)	◦하수도 막힘	오덕희	2010.08.26 현지확인	•우수받이 준설 완료(2010. 08.26)
맨홀뚜껑 고정요청 (‘10.9.24)	◦맨홀뚜껑 고정 요청	이봉주	2009.09.24 현장확인	•맨홀뚜껑 고정완료 (2010. 09. 25)
익산시청 공무원분들 보세요(10.12.18)	◦중앙초등학교 후문쪽 집 앞에서 넘어쟈 발목을 접질린 사고	정은주	보험처리	•보험사와 민원인의 합의로 처리 완료

감사자료 과 요구사항

1. 하수도사업 공기업 운영 사항

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하수행정담당		이 평 구	ꄫ

□ 현      황

◦ 자     산  :  300,376백만원

▸ 자    본  -  298,532백만원

▸ 부    채  -  1,844백만원(부채비율 0.61%)

◦ 2010 차입금상환 : 229백만원

▸ 환특융자금원금  - 179백만원

▸ 환특융자금이자  -  50백만원

◦ 하수도사용료 부과․징수

(단위 : 백만원)

사용료수익 예 산 액	부 과 액	징 수 액	체 납 액	비 고
5,278	5,899	5,804	95

◦ 연도별 부채 상환계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	자 금 명	원 금 (이자율)	미상환 잔 액	상 환 계 획
				2010	2011	2012	2013이후
계	1건	1,774	1,595	177	177	177	1,064
고도처리시설	환특융자금	1,774 (변동금리)	1,595	177	177	177	1,064

◦ 연도별 하수도사용료 현실화 계획

(단위 : ％)

현실화율 목 표	2010년 결산	연 도 별			비 고
		2012	2013	2014
40.0	16.8	30	35	40	전국평균현실화율 (2009년 기준 38.3%)

※현실화율 : (사용요금/처리원가)×100

⃞ 추 진 실 적

◦ 사용료 체납액 강력 징수

(단위 : 백만원)

구 분	부과액	징수액	체납액	비고
계	6,196	5,862	334
2010년	5,899	5,804	95
과년도	297	58	239

▸지역별 담당직원 책임관리 ………………………………………… 2개조 4명

▸전체 체납자 납부 독촉안내문 발송 … 1,547건 119백만원(2011.6월 기준)

※ 위탁징수분은 상수도사용료와 같이 납부독촉을 하고 있음

◦하수도 사용료의 정확한 검침 및 부과로 세입 증대 도모

▸지하수 계측 시간계 설치 및 노후계측기 교체 등

◦ 원인자부담금 징수

▸계    획 - 867백만원         ▸실    적 - 2,678백만원(308.8%)

◦ 여유자금 효율적 관리  …………………………………………	33,000백만원

계	양 도 성 예금증서	알짜배기	정기예금	보통예금	비 고
33,000	0	0	33,000	0	이자수입 1,342

2. 하수도요금 부과징수 및 체납액현황

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하수행정담당		이 평 구	ꄫ

□ 부과징수 현항

(10.12.31 기준, 단위 : 백만원)

구 분	부과액	징수액	체납액	징수율(%)
계	5,899	5,804	95	98.3
상수도	5,408	5,329	79	98.5
지하수	491	475	16	96.7

□ 하수도사용료 연도별 체납액 현황

(단위:백만원)

년 도 금 액	2006 이전	2007	2008	2009	2010
334	150	39	35	15	95

□ 하수도사용료 체납액 현황(상위 20위)

(단위:천원)

연번	수용가명	수용가 번호	주소	체납액	체납연도	비고
계	20건			123,085
1	한제임스본드	170-3167	영등동 773-18(해송사우나)	18,985	2007~2008	상수도 사용자
2	이희덕	131-0015	함열읍 643-17(백제산소황토방)	15,405	2004~2010	지하수 사용자
3	김순자	165-0034	모현동 504-1(빛고을생수탕)	11,767	1998~2004	〃
4	신일섬유	175-0113	팔봉동 제2공단 580-1	10,947	2008	상수도 사용자
5	길기은	170-0093	영등동 824-5(크리스탈스포츠클럽)	10,240	2004~2005	지하수 사용자
6	(주)그랜드관광호텔	156-0861	평화동 329-2	7,872	2005	상수도 사용자
7	정인동	176-0001	부송동190-9(주)유성식품	7,348	2000	지하수 사용자
8	정오중	177-0025	신동 800-4(파이론찜질방)	5,061	2009	〃
9	유영태	176-0006	부송동 237(장승헬스사우나)	4,132	2010	〃
10	정남수	171-0024	어양동1-17(그린스포츠타운)	3,542	2008~2009	〃
11	정승은	170-0002	영등동 548-17(주)에스와이 스포츠센타	3,406	2008~2010	〃
12	한제임스본드	160-0629	인화2가 55-13(스파랜드)	3,206	2007	상수도 사용자
13	한제임스본드	160-0631	인화2가 55-13(스파랜드)	2,962	2007	〃
14	박은별	163-0029	남중 1가 222-13(태평양화원)	2,841	2002~2008	지하수 사용자
15	길기은	170-3106	영등동 824-5	2,798	2005	상수도 사용자
16	그린스포츠타운	171-0024	어양동1-17(그린스포츠타운)	2,685	2009~2010	지하수 사용자
17	이기욱	167-1201	송학동 235-6	2,621	2004~2005	상수도 사용자
18	정현숙	165-4052	모현1가 504-1(빛고을생수탕)	2,616	2003	〃
19	김재겸	177-0025	신동 800-4(파이론찜질방)	2,473	2010	지하수 사용자
20	박연옥	160-0270	인화2가 6(원룸)	2,170	2006	상수도 사용자

3. 하수도사업 채무 및 상환계획(상환조건, 기간 등)

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하수행정담당		이 평 구	ꄫ

□ 채 무 현 황

(단위: 백만원)

구 분	총차입액	상 환 액 (누계)			미 상 환 액
		계	원 금	이 자	계	원 금	이 자
계	1,774	229	179	50	1,595	1,595
환특융자금	1,774	229	179	50	1,595	1,595	변동 금리

※ 환특융자금 이자 및 원금은 환경부에서 지원 상환함.

□ 지방채 상환조건

재 원 별	용 도	상환조건	이율 (년)	상환기간	채권기관
환특 융자금	고도처리시설	5년거치 10년상환	변동 금리	2004 ～2019	환경관리공단

4. ‘06하수관거 임대형 민자사업(BTL)추진사항

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하 수 시 설 담 당		조 규 석	ꄫ

□ 사 업 개 요

◦ 위      치 : 신동, 남중동, 영등동, 모현동, 황등면 일원

◦ 사  업  량 : 관거정비 L= 86.5km,  배수설비 4,644가구

◦ 사  업  비 : 60,158백만원

◦ 사 업 기 간 : 2008. 04 ～ 2011. 5

◦ 사업시행자 : 푸른익산환경(주)

◦ 시 행 방 식 : 임대형 민간투자(BTL) 방식

□ 추 진 사 항

◦ 하수관거 BTL 민간투자사업 선정(환경부)	…………………… 2005. 10. 19

◦ 익  산  시  의  회  승  인	……………………… 2005. 12. 21

◦ 하수관거정비(BTL) 민간투자사업 위․수탁협약(환경관리공단)	…… 2006. 10. 09

◦ 실시협약 체결 및 사업시행자 지정	………………………  2007. 06. 29

◦ 감 리 업 체 선 정(도화기술공사)	……………………  2008. 03. 28

◦ 실   시   계   획   승   인	……………………  2008. 03. 28

◦ 공      사      착      수	………………………  2008. 04. 11

◦ 공      사      준      공	……………………  2011. 05. 11

5. 익산처리구역(제2공구)하수관거 정비사업 추진사항

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하 수 시 설 담 당		조 규 석	ꄫ

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 중앙동, 갈산동, 평화동, 인화동 일원

◦ 사 업 량 : 관거정비 L= 17.5km,  배수설비 445가구

◦ 사 업 비 : 9,812백만원(국비 70%,  시비 30%)

▸2010년 사업비 - 4,230백만원(국비 2,961  시비 1,269)

◦ 사업기간 : 2010. 01 ～ 2011. 12.

※ 현 공 정 : 100%

□ 추 진 사 항

◦ 실 시 설 계 및 공 사 발 주	…………………………………………  2010. 04.

◦ 공  사  계  약  및  착  공	…………………………………………  2010. 06.

◦ 2010년도(1차분) 공사추진	………………………………  2010. 06. ~ 12.

▸관거정비  L=4.6㎞

◦ 2010년도(2차분) 공사추진	………………………………  2010. 01. ~ 12.

▸관거정비  L=9.5㎞

▸배수설비 : 170가구

◦ 2011년도(3차분) 공사추진	……………………………  2011. 01. ~ 12.

6. 공공하수처리시설 설치사업 추진현황

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하수운영담당		정 원 섭	ꄫ

□ 사 업 개 요

사 업 명	위 치	사 업 량	사업비 (백만원)	사업기간	비고 (공정율)
여산지구 하수종말처리장 설치사업	여산면 두여리 일원	600㎥/일 차집관로6.4㎞ 337가구	8,344	2004년~2010.05	완료
오산지구 공공하수처리시설 설치사업	오산면 오산리 일원	490㎥/일 차집관로22㎞ 427가구	7,384	2007년~2011.12	90%
왕궁특수지역 공공하수처리시설 설치사업	왕궁면 온수리, 구덕리 일원	490㎥/일 차집관로43.2㎞ 456가구	6,933	2009년~2012.12	실시설계 완 료

□ 추 진 사 항

◦ 여산지구 하수관거 및 하수처리장 설치 완료	2010. 05 .24

◦ 오산지구 공공하수처리시설 설치사업(총공정90%)	하수관거 완료

◦ 왕궁특수지역 기본 및 실시설계용역 준공	2010. 07

◦ 오산지구 공공하수처리시설 설치사업

▸ 배수설비 시설 완료 및 시운전	2010. 07 ~ 2011. 12

▸ 처리장 내 기계설치(펌프,배관기자재)	2010. 10 ~ 2011. 07

◦ 왕궁특수지역 공공하수처리시설 설치사업

▸ 마을하수처리장 설치 인가 협의(전라북도)	2011. 07

▸ 공사 착공 및 준공	2011. 08~ 2012. 12

7. 하수처리 방류수 재이용사업 추진현황

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하수운영담당		정 원 섭	ꄫ

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 금강동 1091-4 익산공공하수처리시설 부지 내

◦ 사업규모

▸ 공업용수 공급 :  20,000㎥/일

▸ 재처리시설    :  UF(한외여과) + RO(역삼투막여과)

▸ 공 급 대 상   :  익산 1․2산단 전용 공업용수 사용업체(27개소)

◦ 사 업 비 : 19,646백만원(국비 13,752, 시비 5,894)

◦ 사업방식 : 민간투자제안방식(BTO)

◦ 사업기간 : 2008. 01 ～ 2012. 12(5년)

□ 추 진 사 항

◦ 민간투자사업 의향서 접수에 따른 제안서 요구	2010. 01

◦ 민간투자사업 제안서 접수 및 자체 검토	2010. 06

◦ 민간투자사업 제안서 협의 요청(환경부)	2010. 06

◦ 민간투자사업 제안서 검토 의뢰(공공투자관리센터)	2010. 07

◦ 제안서 검토 및 평가(주무관청, 공공투자관리센터)	2011. 03～07

◦ 제3자 제안 공고	2011. 07～10

◦ 실시협약 체결, 사업시행자 지정, 실시계획 승인	2011. 10

◦ 공사착공 및 준공	2011. 12 ～ 2012. 12

8. 유천 생태습지 및 자연형하천 복원사업 추진현황

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하수시설담당		조 규 석	ꄫ

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 금강동 993-1번지 일원

◦ 대상하천 : 유천(각종 환경기초시설 방류수 유입하천)

◦ 사업규모 : 생태하천복원 1.3㎞ / 생태습지조성 180,400㎡ (완충녹지포함)

◦ 사 업 비 : 28,750백만원(국비 14,201, 시비 14,549)

▸ 2010년 확보액 - 2,820백만원(국비1,036 시비1,784)

◦ 사업기간 : 2009. 01 ～ 2014. 12

□ 추 진 사 항

◦ 타 당 성 조 사 및 투 융 자 심 사	2008. 09

◦ 기  본  계  획  용  역  완  료	2009. 07

◦ 도시관리계획(도시계획시설) 결정고시	2010. 07

◦ 계 약 심 의 및 심 사 완 료	2010. 09

◦ 실시설계 용역착수	2010. 12

◦ 실시설계용역완료 및 공사 착공	2011. 10

◦ 공사 준공	2014. 12

9. 합류식 하수도 월류수(CSOs)처리시설 설치사업 추진현황

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하수시설담당		조 규 석	ꄫ

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 평화동 남양공업사뒤,  유천지구,  금마(3개소)

◦ 사 업 량 : 저류시설 V=28,000㎥

◦ 사 업 비 : 32,114백만원(국비22,480, 도비963, 시비8,671)

◦ 사업기간 : 2009년 ～ 2013년(5년)

□ 추 진 사 항

◦ 사 업 추 진  협 약 체 결	2009. 08. 13

▸ 환경부, 전라북도, 익산시, 한국환경공단, 전주시, 김제시, 완주군

◦ 종합계획수립 및 타당성조사 용역 완료	2010. 02

◦ 대형공사  발주방식 심의(일괄입찰)	2010. 02

◦ 기본계획 수립완료	2010. 07

◦ 적격심사평가 및 사업자 선정	2010. 12.

◦ 공  사  착  공	2010. 12.

◦ 공  사  준  공	2013. 12.

10. 공공하수처리장 총인처리시설 설치사업 추진현황

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하수운영담당		정 원 섭	ꄫ

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 2개소(함열공공하수처리장, 여산공공하수처리장)

◦ 시설계획 : 화학적 총인처리시설 및 여과시설 설치

◦ 시설용량 : 함열하수 6,000㎥/일,  여산하수 600㎥/일

◦ 방류수계

▸ 함열하수 : 산북천(함열천) → 금강 → 서해

▸ 여산하수 : 여산천 → 강경천 → 논산천 → 금강 → 서해

◦ 사 업 비 : 1,377백만원(국비 724, 도비 326.5, 시비 326.5)

▸ 2010년 확보액 - 551백만원(국비 311, 도비120, 시비 120)

◦ 사업기간 : 2010. 01 ~ 2011. 12(여산하수 1년, 함열하수 2년)

□ 추 진 사 항

◦ 기본 및 실시설계 발주	2010. 02

◦ 사업 추진계획 수립	2010. 04

◦ 기본 및 실시설계 완료	2010. 06

◦ 실시설계 완료에 다른 재원협의(환경부)	2010. 07

◦ 하수도시설 설치 변경 인가(전라북도)	2010. 10

◦ 공사 발주	2010. 10

◦ 공사 준공(여산하수)	2010. 12

◦ 공사 준공(함열하수)	2011. 06

11. 개인하수처리시설 수질오염 저감 추진현황

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	생활하수담당		송 창 률	ꄫ

□ 사 업 개 요

구 분	계	단독정화조		오수정화조		배 수 설 비 (공공하수도 직관 연결)
		100 인 미 만	100 인 이 상	50 톤 미 만	50 톤 이 상
계	17,627	13,891	1,366	2,171	199	공공하수처리구역내

□ 추 진 사 항

◦ 미신고(허가) 개인하수처리시설(정화조) 양성화 수리

538세개 양성화처리

◦ 기초생활수급자 정화조청소 수수료 지원	98 세대 1,325 천원

◦ 개인하수처리시설 내부청소 안내엽서 발송	12회 14,632건

【청소이행 : 6,925건, 이행율 47.3%】

◦ 오수처리시설 지도점검실시 (일/50톤이상)	55개소

▸ 고발 : 2건 (무단방류)     ▸ 과태료 및 개선명령 : 9건 9,280천원

◦ 개인하수처리시설 내부청소율 제고를 위한 대 시민홍보강화

▸ 언론보도 및 홍보물 제자 배포 (3,000매)

◦ 배수설비 설치 신고	684건

배수설비 준공	317건

12. 하수슬러지 처리시설 설치사업 추진현황

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하수운영담당		정 원 섭	ꄫ

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 금강동 하수처리장 일원

◦ 사 업 량 : 시설용량 120㎥/일(60㎥/일 × 2계열)

◦ 사 업 비 : 19,800백만원(국비 13,860, 시비 5,940)

◦ 사업기간 : 2006. 02 ~ 2011. 12

□ 추 진 사 항

◦ 업무 위․수탁 협약체결(한국환경공단)	2006. 02.  20

◦ 타당성조사 및 기본계획 용역 시행	2006. 08 ～ 2007. 10

◦ 중앙 투융자 심사(적정)	2008. 05. 15

◦ 총사업비 변경 완료	2008. 06. 30

(당초 : 7,153백만원  변경 : 19,800백만원)

◦ 하수슬러지 에너지화 회의 참석(환경부)	2009.  04 ~ 2009. 10

◦ 처리시설 운영 및 부산물 처리 실태 파악	2010. 01 ~ 2010. 07

◦ 하수슬러지 추진 방안 결정 및 사업재개(환경공단)	2010.  08

◦ 추진방안 결정에따른 기본계획 변경	2010.  08 ~ 2011.  11

◦ 2011년도 슬러지 위탁처리 단가계약	2010.  11

◦ 기본 및 실시설계	2010.  12 ~ 2011.  02

◦ 공사 착공 및 준공	2011.  02 ~ 2011.  12

13. 하수도사업관련 각종 용역 추진사항

확인자	:	하수관리과장		김 중 만	ꄫ
작성자	:	하수시설담당		조 규 석	ꄫ
작성자	:	하수운영담당		정 원 섭	ꄫ
작성자	:	생활하수담당		송 창 률	ꄫ

용 역 명	용역개요	용역비 (백만원)	용역기간	공정율 (%)	비고
7건		1,293
익산처리구역(2공구) 하수관거 수밀 및 CCTV 조사용역(2차분)	수밀 및 CCTV 조사용역	55	2010.01.22 ~2010.08.19	100%
익산처리구역(2공구) 하수관거건설 폐기물처리용역(2차분)	폐기물처리용역	137	2010.01.26 ~2010.08.23	100%
왕궁면 흥암리 하수도정비공사 폐기물처리용역	폐기물처리용역	28	2010.03.12 ~2010.10.12	100%
함열 및 여산공공하수처리장 총인처리시설 설치공사 실시설계용역	실시설계	48	2010.03.30 ~2010.12.01	100%
익산처리구역(2공구) 하수관거건설 폐기물처리용역(3차분)	폐기물처리용역	11	2010.09.01 ~2011.03.09	100%
익산처리구역2-1분구 하수관거정비사업실시설계	실시설계	48	2010.12.13 ~2011.03.30	100%
유천생태습지 및 생태하천복원사업 기본 및 실시설계용역	실시설계	966	2010.12.21 ~2011.06.20	100%

□ 사업개요 및 추진사항