건설과

□	비전 및 중점추진과제
□	일 반 현 황
□	2013 예산집행실적
□	2013 상반기 성과 및 반성
□	2013 주요업무추진상황

비전과 중점추진방향

	비 전
도․ 농 균형 발전으로 살기좋은 익산건설

		전 략 목 표
	주민숙원 해소로 편리하고 안전한 도로환경 조성

		중 점 과 제
◦◦ ◦	지역 거점개발 추진을 위한 도로시설 확충 숙원사업 해결하여 생활편익 제공으로 시민만족도 향상 장애인과 여성들을 배려한 밝고 안전한 거리조성

일   반   현   황

□ 기          구

					건 설 과
건설행정			도로시설					도로기반				가로등관리

□ 정  ․  현  원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별								비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능	계약
정 원	22		1	5	6	4		6
현 원	21		1	4	6	4		6
증 감	△1			△1	1	△1		0

□ 사  무  분  장

◦건설행정  : 국 소관사업 및 유관기관 용지매입, 토지수용 재결,

소유권이전 촉탁 및 상속등기, 기타 보상관련 업무전반

◦도로시설  : 철도건널목 개량사업, 고속국도, 국도, 지방도 등 사업

관련협의  시․군도, 농어촌도로 확․포장사업 추진

◦도로기반  : 주민숙원사업, 교통관리 개선사업 추진, 위험도로구조개선

◦가로등관리  : 가로등․보안등 시설 종합계획, 유지보수관리, 생활민원

2013 예산집행실적

【 2013. 5. 24. 현재 】                                     (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율 (%)	비고
건설과				12,590,131	3,518,354	9,071,777	28
	도로시설관리			7,663,657	2,924,657	4,739,000	38.2
		시군농어촌도로확포장		1,096,446	69,277	1,027,169	6.3
			왕궁군도19호선형개량공사	150,000	15,572	134,428	10.4
			미불용지매입비	50,000	44,357	5,643	88.7
			오산북영선(금몽~남전)도로확포장공사	300,000	917	299,083	0.3
			함열용왕교차로~삼기일반산업단지경계간도로확포장	320,000	0	320,000	0
			고려온천아파트~왕궁온천간인도개설공사	70,000	0	70,000	0
			낭산맹동~신정간도로 확포장공사	206,446	8,431	198,015	4.1	이월사업
		철도건널목개량사업		3,931,546	1,829,084	2,102,462	47
			함열철도건널목입체화사업	2,930,546	916,037	2,014,509	31.3	계속사업
			황등철도건널목입체화사업	1,001,000	913,047	87,953	91.2	계속사업
		도로조명시설관리		2,635,665	1,026,296	1,609,369	39
			보안등신규설치	329,800	123,515	206,285	38
			노후가로등정비	121,500	49,118	72,382	40.4
			가로등보안등유지관리	2,150,382	843,663	1,306,719	39.2
			가로등원인자복구	2,000	0	2,000	0
			가로등보수차량운영유지비	22,083	10,000	12,083	45.3
			주민편익증진사업보안등(보조)	9,900	0	9,900	0	도비보조사업

2013 예산집행실적

【 2013. 5. 24. 현재 】                                     (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율 (%)	비고
	지역개발관리			4,896,654	578,197	4,318,457	12
		주민숙원사업		3,605,782	527,495	3,078,287	15
			주민숙원사업	37,760	17,500	20,260	46.3	공통여비및업무추진비
			소규모주민숙원사업	1,373,256	76,993	1,296,263	6	주민참여예산
			주민편익증진사업(보조)	207,164	135,912	71,252	66	도비보조사업
			마을안길노후도로포장	301,000	880	300,120	0.3
			육군부사관학교 가각정리공사	160,000	9,450	150,550	6
			모현육교~이리서초등학교간인도개설공사	300,000	256,196	43,804	85.4
			삼세오충열사자라간 이면도로설치	140,000	0	140,000	0
			왕궁주변배수로 정비공사	17,000	6,727	10,273	40
			신천선나룻가연결 도로개설공사	500,000	23,037	476,963	5	계속사업
			수의과대학진입로개설공사	569,602	800	568,802	0.1	계속사업
		교통관리개선사업		1,290,872	50,702	1,240,170	4
			교통사고잦은곳개선사업	80,000	9,800	70,200	12.3
			회전교차로설치사업	280,000	17,986	262,014	6.4
			위험도로구조개선사업	306,246	1,388	304,858	0.5	계속사업
			안전한보행환경 조성사업	624,626	21,528	603,098	3.4	계속사업 도시개발과
	행정운영경비			29,820	15,500	14,320	52
		기본경비		29,820	15,500	14,320	52

2013 상반기 성과 및 반성

□ 성      과

◦ 모현육교~이리서초등학교 인도설치공사 조기 추진하여 학생통행 편의 도모

▸인도설치공사 완료 : 2013. 4월 준공

◦ 소규모주민숙원사업 조기추진으로 지역경제 활성화 및 주민편익생활 기여

▸140건중 126건 공사추진(발주율 90%)

◦ 도로조명 설치로 밝은거리 조성하여 여성,노약자 등에게 안전한 보행 도모

▸보안등 신규설치 382개소중 258개소(68%)

▸노후가로등 정비 135개소중  73개소(54%)

▸가로등 보안등 민원처리 1,370건

□ 반      성

◦ 2012년 ~ 2013년 도로 보전분 교부세 중단에 따른 시․군도 및        농촌도로 확․포장사업 시비 예산 미 확보로 계속사업 중단

2013 주요업무 추진상황획

		공익사업을위한용지보상 소규모주민숙원사업 주민숙원사업 마을안길노후도로포장 교통관리개선사업 오산 북영선(금몽~남전)확포장공사 함열용왕교차로~삼기일반산업단지경계간도로확포장용역 보안등신규설치 노후가로등정비 철도건널목입체화사업(계속) 전북대인수공통전염병연구소진입로개설공사(이월) 위험도로구조개선사업(이월) 신천선나룻가진입로개설공사(이월)

1		공 익 사 업 을 위 한 용 지 보 상

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 장 : 24개 사업장

(건설과 7 ,도시개발과 8 ,재난안전과 6,  타기관 3 )

◦ 보상대상 : 1,683필지 , 509,069㎡

◦ 보상금액 : 36,897백만원

□ 상반기 추진실적

◦ 토지매입실적 (49%) :   24개소 /   691필지 /  246,601㎡

◦ 보상계획 열람공고  :     1개소 /    8필지  /     123㎡

◦ 감정평가 실시  :   12개소 /  232필지  /   32,078㎡

◦ 토지수용재결신청   :    2개소 /     8필지 /    1,625㎡

▸인화스파리스 제이파크간 도로개설, 낭산맹동~신정간도로개설사업

□ 하반기 추진계획

◦ 지속적인 보상협의 추진(전담반구성 2개반 6명)   :   연중

◦ 찾아가는 보상업무 추진(협의,계약)               :   연중

▸ 미 협의시 토지수용 등 절차이행

◦ 보상자료전산입력(DB구축)                       :   연중

2		소규모 주민숙원사업

□ 사 업 개 요

◦ 개      요 :  함열읍  와리 1129-39  도로( 안길) 덧씌우기외 139건

◦ 위      치 :  익산시  일원( 읍· 면· 동)

◦ 사  업  비 :  1,380 백만원

▸소규모 주민숙원사업 : 136 건 / 1,311 백만원(시비)

▸도비보조사업        :   4 건 /   69 백만원(도비)

◦ 사업기간 : 2013. 01 ～ 2013. 10

□ 상반기 추진실적

◦ 소규모 주민숙원사업 공사 발주 및 추진(발주율90%) : 123건/1,223백만원

◦ 도비보조사업 공사 발주 및 추진(발주율75%)       :  3건/   60백만원

□ 하반기 추진계획

◦ 소규모 주민숙원사업 및 도비보조사업 공사추진 및 공사완료         ▸ 2013. 06 ~ 2013. 10

3		주민숙원사업

□ 사 업 개 요

○ 사 업 량   :  3개사업 사업비 600백만원

▸ 모현육교~ 이리서초등학교간 인도설치공사

- 개    요 : 인도개설 L=170m, B=3m

- 위    치 : 익산시 모현육교～이리서초교 일원

- 사 업 비 : 300 백만원  - 사업기간 : 2013. 01 ～ 2013. 04

▸ 삼세오충열사 ~자라간 이면도로설치공사

- 개    요 : L=380m, B=2.5m

- 위    치 : 익산시 용안면 (삼세오충열사)

- 사 업 비 : 140백만원    - 사업기간 : 2013. 01. ~ 2013. 08

▸ 육군부사관학교 삼거리 가각정리공사

- 개    요 : 인도개설 및 자연석 쌓기 L=85m, B=2m

- 위    치 : 익산시 여산면 육군부사관학교 일원

- 사 업 비 : 160 백만원  - 사업기간 : 2013. 01 ～ 2013. 10

□ 상반기 추진실적

◦ 모현육교~ 이리서초등학교간 인도설치공사 준공   :    2013. 04

◦ 삼세오충열사 ~자라간 이면도로설치공사 착공     :    2013. 04

◦ 육군부사관학교 삼거리 가각정리공사 착공        :    2013. 04

□ 하반기 추진계획

◦ 삼세오충열사 ~자라간 이면도로설치공사 추진 : 2013. 06 ~ 2013. 08

◦ 육군부사관학교 삼거리 가각정리공사 추진    : 2013. 06 ~ 2013. 10

4		마을안길 노후도로 포장공사

□ 사 업 개 요

◦ 개    요 : 노후도로 아스콘덧씌우기 포장 및 도로축대 보수

◦ 위    치 : 29개읍․면․동 노후도로

◦ 사 업 비 : 300 백만원 (시비)

◦ 사업기간 : 2013. 01 ～ 2013. 10

□ 상반기 추진실적

◦ 사업위치 선정(읍면동) 및 설계                :   2013.  01 ～ 03.

◦ 공사발주 및 공사착공                        :   2013.  04 ～ 05.

□ 하반기 추진계획

◦ 마을안길 노후도로 포장공사 추진 및 공사완료 : 2013. 06 ~ 2013. 10

5		교통관리개선사업

□ 사 업 개 요

○ 사업량 : 2개사업 사업비 360백만원(국비180, 시비180)

▸ 회전교차로설치사업

- 위    치 : 익산시 왕궁면 왕궁면사무소앞 사거리

- 사업개요 : 회전교차로 설치 1개소

- 사 업 비 : 280백만원 (국비 140  시비 140)

- 사업기간 : 2013. 01. ~ 2013. 08

▸ 교통사고잦은곳개선사업

- 위    치 : 익산시 삼기면 각동교차로

- 사업개요 : 미끄럼방지 및 횡단보도 조명등 설치

- 사 업 비 : 80백만원 (국비40, 시비40)

- 사업기간 : 2013. 01 ～ 2013. 08

□ 상반기 추진실적

◦  회전교차로설치사업 공사착공             :  2013. 05

◦  교통사고잦은곳개선사업 공사착공         :  2013. 05

□ 하반기 추진계획

◦  회전교차로설치사업 추진 및 공사완료     :  2013. 06 ~ 2013. 08

◦  교통사고잦은곳개선사업 추진 및 공사완료  :  2013. 06 ~ 2013. 08

6		오산 북영선(금몽~남전)확포장공사

□ 사 업 개 요

◦ 위      치 : 오산면 남전리 오산남초등학교 일원

◦ 노  선  명 : 농어촌도로(오산 리도204)

◦ 총사업개요 : L=1,700m B=4m → 8m

▸ 1공구   : L=530m B=4m → 8m(오산남초등학교 진입구간)

◦ 총사업비   : 2,251백만원( 기투자 826백만원, 용지매입 95%)

▸ 1공구   : 600백만원(2013년 예산확보 300백만원)

◦ 공사기간(1공구)  : 2013 ~ 2014년

□ 상반기 추진실적

◦ 공 사 발 주                                :  2013. 04

◦ 공사 계약 및 착공                          :  2013. 05

□ 하반기 추진계획

◦ 토공 및 배수구조물 부대시설 공사추진       :  2013. 6 ~ 2013. 12

◦ 1차분 준공                                 :  2013. 12

7		함열 용왕교차로 ~ 삼기 일반산업단지경계간 도 로 확 ․포 장 공 사 용 역

□ 사 업 개 요

◦ 용역위치 : 함열 용왕교차로~삼기근로자아파트~익산(삼기)산업단지간

◦ 노 선 명 : 군도23호

◦ 용역개요 : L=3.7㎞,  2차선 → 4차선확장

◦ 용역내용 : 실시설계, 측량, 지질조사,사전재해영향성검토,

소규모 환경영향평가, 교통성검토 등

◦ 용 역 비 : 320백만원

◦ 용역기간 : 2013. 01 ~ 2013. 12

□ 상반기 추진실적

◦	용 역 발 주                                 :  2013. 4

◦	용 역 계 약  및  착 공                      :  2013. 6

□ 하반기 추진계획

◦ 현황측량 및 지질조사                        :  2013. 7. ~  8.

◦ 노선결정 유관기관 협의(재해, 환경, 교통 등)   :  2013. 8. ~ 10.

◦ 도로구역 결정 및 실시설계                   :  2013. 11.~ 12.

8		보안등신규설치

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 :  익산시 일원

◦ 사 업 비 :  339백만원

◦ 사업기간 :  2013. 02. ~ 2013. 10.

◦ 보안등 신규 설치공사 내역 (기존 보안등수 17,103등)

구 분	사 업 개 요	예산(천원)	비 고
합 계	382개소	338,700
시민불편해소 보안등신설	보안등 설치 20개소	13,400
산책로정비 보안등신설	보안등 설치 31개소	62,000	황등,낭산,여산,왕궁
생활환경 개선사업	보안등 설치 215개소	180,600	주민참여편성예산
소규모 주민숙원사업	보안등 설치 104개소	72,800
주민편익 증진사업	보안등 설치 12개소	9,900	도비

□ 상반기 추진실적

◦ 생활환경 개선사업, 주민편익 증진사업        :  190 백만원

◦ 보안등 설치공사                             :  258개소 설치완료

□ 하반기 추진계획

◦ 보안등 설치공사 신규설치장소 현지조사       :  2013. 6.

◦ 보안등 설치공사 실시설계                    :  2013. 7.

◦ 공사착공 및 준공                            :  2013. 8 ~10

9		노 후 가 로 등 정비

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  :  익산시 일원

◦ 사 업 량  :  5개 사업

◦ 사 업 비  :  120백만원

◦ 사업기간  :  2013. 03.  ~  2013. 10.

◦ 노후가로등 정비 사업내역(기존 가로등 수 8,119)

구분	위 치	사 업 명	사 업 개 요	예산(천원)	비 고
합 계		5개 사업	가로등 정비 135개소	120,500
노후가로등정비	시내일원	도심지역 도로조명 노후선로 정비	노후 선로정비 40개소	40,000
	시내일원	노후 가로등 점멸기 교체	노후가로등 점멸기 교체 5개소	22,500
	시내일원	노후 보안등기구 교체	노후보안등 기구 교체 70개소	28,000
	산업단지	산업단지 및 자유지역 노후선로 정비	노후 선로정비 10개소	20,000
	시내일원	우기대비 가로등 안전진단 부적합 전기시설 보수	부적합 전기시설보수 10개소	10,000

□ 상반기 추진실적

◦ 도심지역 도로조명 노후선로 정비공사외 2개사업     :   73 백만원

◦ 노후선로정비 19개소, 노후점멸기교체 5개소, 노후등기구교체 73개소

□ 하반기 추진계획

◦ 노후가로등 정비 현장조사                          :  2013. 6.

◦ 노후가로등 정비공사 실시설계                      :  2013. 7.

◦ 공사착공 및 준공                                  :  2013. 8 ~10

10		철도 건널목 입체화사업(계속사업)

□ 사 업 개 요

◦ 함열용성 철도건널목 입체화사업

▸ 개    요 : 도로(L=1.58㎞, B=8~13m)  교량(1개소/140m)

▸ 사 업 비 : 18,170백만원(시설공단 13,627, 익산시 4,543)

- 2013년까지 확보액 : 17,861백만원(시설공단13,627, 익산시4,234)

- 미 확보액         : 309백만원

▸ 공사기간 : 2010. 05 ~ 2013. 12

▸ 시 행 청 : 익산시청

▸ 용지매입 : 87%완료   ◦ 현 공 정 : 75%

◦ 황등동연 철도건널목 입체화사업

▸ 개    요 : 도로(L=0.95㎞, B=15.4m)  지하차도(2개소/580m)

▸ 사 업 비 : 27,402백만원(시설공단 20,551, 익산시 6,851)

- 2013년까지 확보액 : 14,633백만원(시설공단12,094, 익산시2,539)

▸ 공사기간 : 2010. 12 ~ 2014. 06

▸ 시 행 청 : 한국철도시설공단

▸ 용지매입 : 91%완료    ◦ 현 공 정 : 43%

□ 상반기 추진실적

◦함열 용성 - 보강토 옹벽 설치 및 토공(성토)작업   :  2013. 3 ~ 5

◦황등 동연 - 토공 및 동연지하도(BOX) 구조물 설치  :  2013. 3 ~ 5

□ 하반기 추진계획

◦ 함열 용성

▸ 도로포장 및 부대공사 추진                    :  2013. 6 ~ 12

▸ 공  사   준  공                              :  2013. 12

- 시비 분담금 미 확보액 추경예산 반영        :  309백만원

◦ 황등 동연

▸ 구조물, 부대공사 추진                         :  2013. 6 ~ 12

- 시비 분담금 미 확보액 추경예산 반영         :  3,067백만원

※ 시비 분담금 미확보시 철도건널목 입체화사업 중단 우려

11		전북대 인수공통전염병 연구소 진입로 개설공사(이월사업)

□ 사 업 개 요

◦ 개   요  : 도로개설(L=1.6㎞, B=8m)  ※ 도로부지 20m확보

◦ 위   치  : 익산시 삼기면 용연리 ~ 월성동

◦ 사 업 비 : 4,543백만원(특별교부세 1,400 ․ 시비 3,143)

※ 2012년까지 4,543백만원 예산확보 완료

◦ 공사기간 : 2011. 12 ~ 2013. 11

◦ 용지매입 : 99%

◦ 현 공 정 : 85%

▸ 토공(연약지반 처리) 및 구조물(배수로) 시공

▸ 토공(절․성토) 및 보조기층 포설 다짐

□ 상반기 추진실적

◦ 토공(연약지반 처리) 및 구조물(배수로) 시공

◦ 토공(절․성토) 및 보조기층 포설 다짐

□ 하반기 추진계획

◦ 도로포장 및 부대공사 추진                :  2013. 6. ~ 2013. 11.

◦ 공 사  준 공                             :  2013. 11

12		위험도로구조개선사업(이월사업)

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 금마면 서고도리, 신용리 일원(금마저수지 옆)

◦ 사 업 량 : 도로선형개량 L=1.99Km, B=8.0m(4개 공구)

▸1공구 L=0.3km, 2공구 L=1.06km, 3공구 L=0.3km, 4공구 L=0.3km

◦ 사 업 비 : 760백만원 (국비380, 시비380)

▸이월사업비 382백만원(명시94, 사고288)

◦ 사업기간 : 2012. 01 ~ 2013. 10

□ 상반기 추진실적

◦ 2, 3공구 공사준공     :  2012년 완공

◦ 1, 4공구 추진

▸ 편입토지 협의불응 7필지 872㎡(소유자 3명)

◦ 토지소유자 지속적 협의

▸ 감정평가 가격 저렴으로 협의매수 불응

◦ 토지 재 감정          :  2013. 01.

□ 하반기 추진계획

◦ 미 협의 토지수용 신청                   : 2013. 07

◦ 토지수용 후 공사추진(1공구, 4공구)       :  2013. 09 ~2013. 12

13		신천선나룻가진입로개설공사(이월사업)

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 인화동 일원 (신천선나룻가 주변)

◦ 규    모 : L=60m, B=17m (8m⇒17m)

◦ 사 업 비 : 500백만원 (공사비 250․토지매입 70․건물보상 180)

▶ 2013 이월사업비 : 500백만원 (명시)

◦ 사업기간 : 2012. 01. ~ 2013. 12

□ 상반기 추진실적

◦ 편입토지 및 지장물 보상

- 편입토지 5필지 127㎡,  지장물 가옥 5동

◦ 토지소유자 지속적 협의

▸ 감정평가 가격 저렴으로 협의매수 불응

◦ 편입토지 및 지장물 재 감정  :  2013. 05.

□ 하반기 추진계획

◦ 미 협의 토지수용 신청                   : 2013. 07

◦ 토지수용 후 공사추진                    : 2013. 09 ~2013. 12