2014. 2. 10. ~ 2. 21.

제174회 익산시의회(임시회)

2014  주요업무계획

전략산업국

경영개발과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2013 성 과 및 반 성
□	2014 주 요 업 무 계 획

비전 및 중점추진방향

	비 전
기업이 필요로 하는 최고 ･ 최적의 산업용지 제공

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	산업단지 기반시설 구축으로 기업하기 좋은 도시환경 조성 맞춤형 전문산업단지 조성으로 지역 경쟁력 강화 공영개발 특별회계의 효율적 운영으로 재정의 건실화 추진

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	기업유치 촉진을 위한 산업단지 기반시설 조성 농촌지역 균형발전을 위한 전문농공단지 조성 공평한 보상업무 추진으로 행정신뢰도 제고

일   반   현   황

□ 기          구

					경영개발과
경영행정			용지보상					경영개발1				경영개발2

□ 정  ․  현   원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	14		1	5	5	3
현 원	14		1	4	5	4
증 감				△1		1

□ 사  무  분  장

◦ 경영 행정 : 공영개발사업 기획 및 조정, 공영개발사업 계약업무

공영개발특별회계 예산 및 자금운용, 지방채업무

◦ 용지 보상 : 용지분양 계획수립 및 추진, 경영평가 분석, 용지매입 및 보상,

지적공부정리, 토지수용  및  공탁, 공유재산 및 미분양용지 관리

◦ 경영개발1 : 익산일반산업단지 진입도로 개설사업, 익산제3일반산업단지  폐수종말처리시설 증설사업, 산업단지주변마을 주민숙원사업

◦ 경영개발2 : 함열농공단지 LED집적화사업, 신재생자원센터 주변 개발사업

2013 주요성과

□ 익산일반산업단지 조성사업

◦ 사업추진 : 2006. 1월/ 2013. 6. 28 준공

◦ 단지조성 및 기반시설

‣단지 2,795천㎡, 도로 26㎞, 교량 8개소, 상․하수도 103㎞ 등

◦ 익산 제3일반산업단지 지정 (개발계획) 변경 및 실시계획 변경

승인 (전라북도) : 2013. 9. 27.

□  함열농공단지 LED집적화사업

◦ 한국LED조명공업협동조합 민간사업 제안 : 2013. 4. 4.

◦ SPC출자 타당성 검토용역 완료 (타당) : 2013. 8. 2.

◦ 출자 등에 관한 조례 제정 및 SPC 자본금출자 동의 (시의회) : 2013. 11. 15.

◦ 특수목적법인(SPC) 설립 : 2014. 1. 14.

□  익산일반산업단지 진입도로 개설공사

◦ 사 업 추 진 : 2010. 3월/ 2016. 2월 준공예정 (전체 공정률 32%)

◦ 공사준공 (2차) : 2013. 11. 30.

◦ 토지 및 지장물 보상 추진 : 71% (대상 776천㎡/ 보상 551천㎡)

‣토지 665건/ 551천㎡, 지장물 762건, 분묘 262기

2014 주요업무계획

		익산일반산업단지 진입도로 개설공사 익산제3일반산업단지 폐수종말처리시설 증설사업 함열농공단지 LED집적화사업

1		익산일반산업단지 진입도로 개설공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산제3일반산업단지 (낭산면) ~ 연무 IC (논산시 연무읍)

◦ 사업내용 : 도로신설 L=11.86㎞ (4차로), 교량신설 19개소 (1,245m)

◦ 사업기간 : 2010 ~ 2016 (7년)

◦ 총사업비 : 1,604억원 (공사비 1,187 보상비 등 417)

※ 재 원 별 : 국비 809, 도비 27, 시비 768

※ 현 공정율 :  32%

□ 추 진 계 획

◦ 공사 착공 (3차분)	2014.  2.

◦ 감리용역 착수 (3차분)	2014.  2.

◦ 용지매입 (80%/ 621천㎡)	2014. 12.

◦ 공사 준공 (전체분)	2016.  2.

□ 기 대 효 과

◦ 산업단지 입주기업의 물류·수송비용 절감으로 기업경쟁력 강화

◦ 수도권과 연결되는 진입도로 확보로 주요 가로망 교통체증 해소

2		익산제3일반산업단지 폐수종말처리시설 증설사업

□ 사 업 개 요

◦ 위     치 : 익산제3일반산업단지 폐수종말처리장 내

◦ 사업 내용 : 폐수처리장 (2,500톤/ 일) 증설, 총인처리시설, 부대시설

◦ 사업 기간 : 2013 ~ 2015 (3년)

◦ 총사 업 비 : 107억원 (국비 75, 시비 32)

□ 추 진 계 획

◦ 폐수처리공법 검토 및 선정	2014.  2.

◦ 실시설계 완료 및 환경부 검토 승인	2014. 3. ~ 5.

◦ 공사 착공	2014.  6.

◦ 공사 준공	2015. 10.

□ 기 대 효 과

◦ 산업단지 입주기업의 폐수처리 경제적 부담경감으로 기업투자 유도

◦ 방류수질 기준의 적법처리 및 방류수역의 수질개선

3		함열농공단지 LED집적화사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 함열읍․용안면 일원

◦ 사업규모 : 329천㎡

◦ 사업내용 : LED전문산업단지 조성

◦ 사업기간 : 2011 ~ 2016 (6년)

◦ 총사업비 : 350억원 (SPC)

□ 추 진 계 획

◦ 용지 매입	2014.  2.

◦ 공사 착공	2014.  6.

◦ 공사 준공	2016. 12.

□ 기 대 효 과

◦ LED산업 집적화를 위한 생산기반 구축으로 지역경제 활성화

◦ 북부지역 공단조성으로 지역균형 발전도모 및 주민숙원 해소