2014.  7.

제177회 익산시의회(임시회)

― 2014 주요업무 보고 ―

상반기 결산 및 하반기 추진계획

환경녹지국

보 고 순 서

□	일반현황	………	3
□	환경위생과	………	9
□	청소과	………	33
□	산림과	………	55
□	도시공원과	………	83

도시공원과

□	비전 및 중점과제
□	일 반 현 황
□	2014 예 산 집 행 실 적
□	2014 상반기 성과
□	2014 주 요 업 무 추진상황

비전과 중점과제

	비 전
자연 생태적 녹색환경 도시 조성

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	시민체감형 문화․여가 공간 확충 자연 친화적 녹색도시 조성 쾌적한 공원․녹지 환경 조성

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	푸른 숲과 꽃이 어우러진 아름다운 녹색공간 조성 시민의 삶의 질 향상을 위한 생태 휴식공간 조성 시민 중심 공원 정비로 편리하고 안전한 공원환경 조성

일  반  현  황

□ 기       구

				도시공원과
푸른숲조성			조 경				공 원 조 성			공 원 관 리

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별								비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능	계약
정 원	16		1	4	2	5	4
현 원	15		1	6	5	3	0
증 감	△1			2	3	△2	△4

□ 사 무 분 장

◦ 푸른숲조성 : 도시숲 조성, 가로수 및 가로화단 조성, 학교공원화 사업,

쌈지공원조성, 수목 양묘장 관리

◦ 조       경  : 초화류 재배 및 식재, 꽃길조성 관리, 주요도로변 특화거리 조성,  꽃묘 양묘장 관리

◦ 공 원 조 성 : 공원조성, 공원녹지조성사업, 공원리모델링사업

◦ 공 원 관 리 : 공원시설물 설치 및 유지관리, 공원 수목식재 및 유지 관리

(전지, 방제, 예취, 풀메기)

2014 예산집행실적

【 2014. 6. 30. 현재 】                                       (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
도시공원과				5,098,129	2,662,926	2,435,203	52.2
	녹색도시조성			5,006,634	2,615,881	2,390,753	52.2
		도시림 조성		885,794	448,688	437,106	50.7
			도시숲 조성	200,000	181,975	18,025	90.1
			도시숲 유지관리 (자체)	35,794	13,660	22,134	38.2
			녹색자금지원사업	650,000	253,053	396,947	38.9
		가로수 조성 및 관리		347,240	206,816	140,424	59.6
			가로수 조성	200,000	145,032	54,968	72.5
			가로수 유지관리 (자체)	128,716	60,453	68,263	47.0
			수목양묘장 조성 및 관리	18,524	1,331	17,193	7.2
		공원조성		1,750,000	638,076	1,111,924	36.5
			소라산공원 조성사업	1,250,000	638,076	611,924	51.1	이월 예산 포함
			신용공원 조성사업	500,000	0	500,000	0	이월 예산 포함
		공원녹지관리		1,535,493	1,031,988	503,505	67.2
			공원녹지시설 유지관리	1,115,738	807,876	307,862	72.4	이월 예산 포함
			공원녹지 수목 유지관리	419,755	224,112	195,643	53.4

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
		가로화단 경관조성		488,107	290,313	197,794	59.5
			가로화단 조성 및 관리	170,425	93,000	77,425	54.6
			꽃양묘장 관리 및 꽃 조성	186,952	102,000	84,952	54.6
			푸른익산가꾸기 운동본부지원	45,480	45,480	0	100
			중앙분리대 수목관리	18,241	0	18,241	0
			산림서비스 도우미	42,009	25,244	16,765	60.1
			학교공원화 및 담장없애기 사업	25,000	24,589	411	98.4
	가로수 재해방지			51,518	25,696	25,822	49.9
		도로변 병해충방제		51,518	25,696	25,822	49.9
			병해충 방제 물품	27,423	4,886	22,537	17.8
			병해충 방제(자체)	18,000	15,530	2,470	86.3
			병해충 방제	6,095	5,280	815	86.6
	행정운영경비			39,977	21,349	18,628	53.4
		기본경비		39,977	21,349	18,628	53.4
			기본경비	39,977	21,349	18,628	53.4

2014 상반기 성과

□ 성      과

◦ 시민들에게 휴식 공간 및 생태 교육 공간 제공

▸도시숲 조성사업(함열역 주변)

- 200백만원(광특 100, 시비 100)

▸가로수 식재(여산면 741 지방도 외 1)

- 200백만원(광특 100, 시비 100)

▸녹색공간 및 나눔숲 조성사업(사회복지시설, 전북대학교 익산캠퍼스 실습장)

- 650백만원(공모사업)

◦ 도심지 꽃 거리 조성으로 자연친화적 도시경관 연출

▸계절별 꽃 식재 : 팬지, 메리골드 등 13종 350,000본(시 직영재배)

▸특색 있는 식물로 조경 : 황금사철, 헤데라 등 8종 12,000본

▸익산서동축제 꽃 지원 : 축제장에 메리골드 등 17,000본 지원

▸중앙동 특화 꽃 거리 조성 : 꽃걸이, 사각화분, 원형화분 등 조경

◦ 소라산(자연마당) 조성사업

▸생태기반 환경복원 및 다양한 생물서식지 복원

- 11,362백만원(국비 3,000, 시비 8,362)

◦ 쾌적하고 안전한 공원환경 조성

▸공원 파손 및 노후 시설물 등 정비 : 부송근린공원 외 32개소

▸수목 보식 및 야생화 식재 : 남중공원 외 8개소

- 수목(느티나무 외 4종 4,140본), 야생화(금계국 외 1종 35,000본)

▸태풍피해 예방 전지작업 : 제1공단 녹지 외 2개소

2014 주요업무 추진상황

		도시숲 조성 및 관리 녹색나눔숲 조성사업 녹색공간조성사업 자연친화 꽃거리 조성사업 소라산공원(자연마당) 조성사업 신용쉼터조성사업 도시공원 및 녹지관리

1		도시숲 조성 및 관리

□ 사 업 개 요

◦ 위    치

▸도시숲 조성  :  함열역 주변 1개소(산림청 역사(驛舍)의 숲 조성계획)

- 수목식재, 휴게공간 조성 (3,000㎡)

▸가로수 조성  :  여산면 741 지방도 등 2개노선 3km

▸가로수 유지관리  :  하나로 등 120개 노선 340km

◦ 사 업 비 : 528백만원(광특 200, 시비 328)

▸도시숲 조성      :  200백만원(광특 100, 시비 100)

▸가로수 조성      :  200백만원(광특 100, 시비 100)

▸가로수 유지관리  :  128백만원(시비)

□ 상반기 추진실적

◦ 도시숲 조성사업

▸실시설계 용역 완료(철도청 협의)              :  2014. 3.  7

▸경관디자인 자문, 계약심사 완료                 :  2014. 4. 25

▸공사 착공 및 준공                            :  2014. 5 ~ 6월

◦ 가로수 조성사업

▸설계서 작성 완료                             :  2014. 4.  7

▸가로수 식재 착수 및 준공                     :  2014. 4. 23 ~ 6. 1

◦ 가로수 유지관리                                :  2014. 2 ~ 6월

▸수형조절 및 부정아 제거, 병해충 방제 등

□ 하반기 추진계획

◦ 가로수 유지관리 지속 추진                     :  2014. 7 ~ 12월

▸가로수 보식 및 부정아 제거, 병해충 방제 등

2		녹색 나눔숲 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  :  마동 224-1번지 일원(전북대 익산캠퍼스 실습장)

◦ 사업내용  :  한방체험숲길, 담장 철거, 수목식재, 휴게공간 조성 등

◦ 사 업 비  :  400백만원(국비 - 산림청 공모사업 선정)

◦ 사업기간  :  2014. 2 ~ 10월

□ 상반기 추진실적

◦ 녹색나눔숲 조성사업을 위한 전북대(익산캠퍼스)와 협의 : 2013. 12 ~ 2014. 2

▸면 담 자 : 조경학과 교수 외 2인

▸내    용 : 실시설계 작성에 따른 협의

◦ 녹색 나눔숲 조성사업 실시설계 용역 완료        :  2014. 3.  7

◦ 녹색사업단 설계서 사전심사 완료                :  2014. 4. 22

◦ 경관디자인 자문 완료                           :  2014. 5. 21

◦ 설계심의, 계약심사 추진                        :  2014. 6월

□ 하반기 추진계획

◦ 공사 착공 및 준공                             :  2014. 7 ~ 10월

3		녹색공간 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  :  이리자선원, 동그라미재활원

◦ 사업내용  :  산책로 조성, 콘크리트 철거, 수목식재, 벤치설치 등

◦ 사 업 비  :  250백만원(도비 - 산림청 공모사업 선정)

◦ 사업기간  :  2014. 2 ~ 8월

□ 상반기 추진실적

◦ 이리자선원, 동그라미재활원과 협의	: 2013. 12 ~ 2014. 2

▸면 담 자 : 이리자선원 원장외 3인

▸내    용 : 실시설계 작성에 따른 협의

◦ 녹색공간조성사업 실시설계 용역 완료            :  2014. 3.  7

◦ 녹색사업단 설계서 사전심사 완료                :  2014. 3. 25

◦ 경관디자인 자문, 계약심사 완료                 :  2014. 4. 16

◦ 조성공사 착공 및 준공                           :  2014. 4 ~ 6월

□ 하반기 추진계획

◦ 녹색공간조성사업지 사후관리 철저               :  2014. 10 ~ 11월

▸시설물 및 수목 관리

4		자연친화 꽃거리 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업내용  :  자연친화적 도시건설을 위한 꽃길 조성

▸주요도로변 가로화단 및 교통섬 등 꽃 식재

◦ 사 업 비  :  263백만원(인건비, 재료비, 일반운영비)

◦ 사업기간  :  2014. 1 ~ 12월

□ 상반기 추진실적

◦ 다양한 초화류 재배 식재

▸꽃    종  :  팬지, 페츄니아, 메리골드, 진노랑 상사화 등 21종

▸꽃 재 배  :  목천동 직영 꽃 양묘장

▸식재본수  :  350,000본 (봄꽃․여름꽃 재배 및 식재, 덩굴․관목류 식재)

◦ 익산서동축제 꽃 지원

▸기    간  :  2014. 6. 21 ~ 6. 22

▸내    용  :  서동공원 입구․광장 등에 메리골드 등 17,000본 지원

◦ 중앙동 특화 꽃거리 조성

▸기    간  :  2014. 6 ~ 7월

▸내    용  :  원형화분 장식, 가로등주 꽃걸이, 상가 앞 사각화분 등 설치

□ 하반기 추진계획

◦ 페츄니아, 백일홍 등 여름, 가을꽃 식재(10종 175,000본)

◦ ‘평생학습축제’ 원형화분 지원 (10,000본 식재)

5		소라산 공원(자연마당) 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  :  영등동 산140 번지(소라산 일원)

◦ 규    모  :  생태공원 42,254㎡

◦ 사업내용  :  자연생태숲, 산책로, 생태습지, 생태체험관 등

◦ 사 업 비  :  11,362백만원 (시비 8,362  국비 3,000)

▸2014년도  미확보 예산  1,370백만원 (추경확보 필요)

◦ 사업기간  :  2008. 10월 ~ 2015. 12월

□ 상반기 추진실적

◦ 편입토지 및 지장물 보상(1차 계획분)             :  2014. 5월

(총 37,241㎡중 36,408㎡) - 98% 매입

◦ 자연마당 진입도로 공사 완공                    :  2014. 5월

◦ 자연마당 편입 부지 지장물 철거                 :  2014. 6월

□ 하반기 추진계획

◦ 공원조성계획 변경 및 사업 인가                 :  2014. 6 ～ 7월

◦ 자연마당 본 공사 착공(환경부)                   :  2014. 9월

6		신용 쉼터 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  :  신용동 547 번지(연방죽 일원)

◦ 규    모  :  12,938㎡정도

◦ 사업내용  :  산책로, 휴식공간, 수목식재, 운동기구 등

◦ 사 업 비  :  500백만원(특별교부세)

◦ 사업기간  :  2014. 5 ~ 11월

□ 상반기 추진실적

◦ 주민 및 토지주(원불교) 의견 수렴	:  2014. 1 ～ 2월

◦ 토지주(원불교)와 협약 체결	:  2014. 3월

(토지 무상 사용, 비용부담, 시설물 사후관리)

◦ 실시설계 및 설계 심의 완료	:  2014. 5 ～ 6월

□ 하반기 추진계획

◦ 신용쉼터 조성사업 착공	:  2014.  8월

◦ 신용쉼터 조성사업 준공	:  2014. 11월

7		도시공원 및 녹지 관리

□ 사 업 개 요

◦ 대    상  :  공원 95개소 555㏊,  녹지 76개소 90㏊

◦ 사업내용  : 시민이 편리하게 이용할 수 있는 공원시설 정비 및 수목 관리

◦ 사 업 비  :  1,335백만원(시설관리 915, 수목관리 420)

◦ 사업기간  :  2014. 1 ~ 12월(년중)

□ 상반기 추진실적

◦ 공원 시설물 및 환경 정비

▸노후 파손 시설물 수시 정비 : 부송근린공원 외 32개소

▸환경정비 : 기간제 근로자 8인 사역으로 화장실 및 공원 청소

◦ 수목 보식 및 야생화 식재

▸위치 : 남중공원외 8개소

▸식재 : 수목(느티나무 외 4종 4,140본), 야생화(금계국 외 1종 35,000본)

◦ 공원 수목관리

▸병해충 방제 : 4회 실시(116개소)

▸소나무 전지작업 : 영등근린공원외 7개소(400본)

▸가지치기 및 고사지 정리 : 수시(70개소)

▸태풍피해 예방전지 : 제1공단 녹지외 2개소(50본)

◦ 제초 및 잔디 관리

▸예취 및 풀메기 : 수시(116개소)

□ 하반기 추진계획

◦ 파손 시설물 정비 및 환경정비                  :  수 시

◦ 공원수목관리(병해충 방제, 전지, 시비)           :  2014. 7 ~ 12월