2014.  7.

제177회 익산시의회(임시회)

― 2014 주요업무 보고 ―

상반기 결산 및 하반기 추진계획

건설교통국

보 고 순 서

□	일반현황	………	3
□	도시개발과	………	9
□	건설과	………	33
□	주택과	………	61
□	교통행정과	………	81
□	도로관리과	………	105
□	차량등록사업소	………	131

일  반  현  황

□ 기구 및 정․현원

																	건설교통국
도시개발과									건 설 과										주 택 과													교통행정과										도로관리과										차량등록 사 업 소
도시행정		도시계획				도시개발	도시재생		건설행정	도로시설		하천시설		하천관리		가로등관리			주택행정		주택관리		건축민원		건축물관리		공공시설					교통행정	교통물류			교통관리			교통지도			도로행정		도로관리		도로기반			가로정비			관리	등록

◦ 기    구  ………………………………………………  5 과 1 사업소

◦ 정․현원

(정원 / 현원)

구 분	정원	현원	직 급 별
			3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	계약
계	144	139		1 1	6 6	29 35	40 53	39 31	29 11	0 2
도시개발과	23	21		1 1	1 1	4 5	6 7	7 5	4 2
건설과	24	22			1 1	6 6	9 10	7 5	1
주택과	30	30			1 1	5 8	11 11	12 5	1 3	0 2
교통행정과	24	23			1 1	6 5	6 11	4 6	7
도로관리과	27	26			1 1	5 7	4 9	5 5	12 4
차량등록사업소	16	17			1 1	3 4	4 5	4 5	4 2

□ 부서별 주요업무

부 서	주 요 업 무
도시개발과	∙도시기본계획 수립, 도시계획시설 결정 및 변경, 지구단위계획 수립 ∙도시계획도로 개설, 자전거도로 계획수립 및 시행, 개발행위 허가 ∙국가복합환승센터 개발사업, 구도심 특화거리 조성
건설과	∙국 소관사업 및 유관기관 용지매입, 토지수용 재결 ∙철도건널목 개량사업, 시․군도, 농어촌도로 확․포장사업 ∙하천 기본계획 수립, 지방하천 개량사업, 소하천 정비사업 ∙하천제방관리, 골재채취허가, 하천사용료 징수부과, 생태하천관리 ∙가로등․보안등 시설 종합계획, 유지보수관리, 생활민원
주택과	∙불법건축물 지도단속, 건축물 부설주차장 관리, 저소득임대보증금지원 ∙주택건설사업 계획승인, 공동․임대주택관리, 도시주거환경 개선사업 ∙농촌주거환경 개선사업, 건축허가 및 신고, 공공청사 건축공사 감독
교통행정과	∙교통체계 개선을 위한 교통안전시설물 확충 ∙어린이보호구역 개선사업 ∙대중교통 활성화 및 교통편익증진 ∙운수업체등 지도․단속 및 교통질서 확립 유도 ∙불법 주․정차 단속, 과태료 부과, 주․정차 금지 및 견인구역 지정
도로관리과	∙기동성 있는 도로 유지보수 및 관리체제 운영 ∙일자리 창출을 통한 보행환경 조성 ∙주민숙원사업, 교통환경개선 사업 ∙불법광고물․노점상․노상적치물 정비로 쾌적한 가로환경 조성
차량등록사업소	∙자동차등록, 자동자 저당, 압류, 말소, 해제, 자동차 정기검사 ∙자동차관리법 위반 및 책임보험 과태료 부과, 징수 등 ∙건설기계 등록, 건설기계 면허증 발급, 이륜자동차 신고 및 관리

□ 국토의 용도구분

◦ 행     정     구     역  :  506.925㎢

▸도시지역              :   76.090㎢(행정구역의 15.0%)

□주거지역 : 17.771㎢          □상업지역 :  1.869㎢

□공업지역 : 10.542㎢          □녹지지역 : 45.908㎢

▸관리지역              : 214.713㎢(42.4%)

□계획 90.882㎢, 생산 75.446㎢, 보전 48.385㎢

▸농림지역              :  194.143㎢(38.3%)

▸자연환경보전지역      :   21.979㎢( 4.3%)

□ 도로․하천 현황

◦ 도  로 : 총연장 1,419.8㎞    포장연장 881.3㎞ (포장율 62.0%)

▸고속․일반국도  94.9㎞/94.9㎞(100%),  지방 162.7㎞/143.5㎞(88.2%)

▸시․군도  640.2㎞/454.1㎞(70.9%),  농어촌도로  552㎞/188.8㎞(36.2%)

◦ 하  천 : 총 304.7㎞   89개소(개수율 49%)

▸국가하천 34.2㎞(100%), 지방하천 172.0㎞(51%), 소하천 98.5㎞(28%)

□ 주 택 현 황

○ 주택수 121,189호/주택 총가구수 109,391호(주택보급율 110.79%)

▸단  독 50,880(42%) ▸아파트 66,400(54.8%) ▸연  립 1,521(1.2%)

▸다세대 2,388( 2%)

□ 차량등록 현황

◦ 총 등록대수 : 144,964대(자동차 126,049 , 건설기계 4,121 , 이륜차 14,794)

▸자 동 차 :  126,049대

- 승    용  :  92,895대(자가용 90,473  영업용 2,300  관용 122)

- 승    합  :  6,378대(자가용  5,680   영업용  614  관용  84)

- 화    물  :  26,776대(자가용 23,652  영업용 2,907  관용 217)

▸건설기계 :   4,121대 (자가용  2,835 영업용 1,256  관용  30)

▸이륜자동차 : 14,794대 (자가용 14,651 관용 143)

□ 운수업체 현황

◦ 합    계  :     233개업체  4,960대

▸버  스  :  시내  3개업체    164대   전세 10개업체  384대

▸택  시  :  회사 14개업체    505대   개인         1,016대

▸용  달  :  회사  5개업체     18대   개인           379대

▸화  물  :  일반 193개업체  1,883대   개별           596대

▸장의차  :        8개업체    15대

□ 2014 예산집행실적

【 2014. 6. 30. 현재 】                                       (단위 : 천원)

구 분	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
계	75,044,841	37,109,169	37,935,672	49.4
도시개발과	24,447,610	11,098,839	13,348,771	45.4
건설과	16,392,398	8,066,948	8,325,450	50.0
주택과	3,019,504	1,297,018	1,722,486	43.0
교통행정과	25,204,678	13,322,614	11,882,064	52.9
도로관리과	5,773,259	3,219,463	2,553,796	55.7
차량등록사업소	207,392	104,287	103,105	50.3

도시개발과

□	비전 및 중점과제
□	일 반 현 황
□	2014 예 산 집 행 실 적
□	2014 상반기 성과 및 반성
□	2014 주 요 업 무 추진상황

도시개발과 비전과 중점과제

	비 전
도·농 발전과 역세권 중심의 균형있고 조화로운 도시건설을 위한 기반조성

		중 점 과 제
◦ ◦	역세권 개발을 통한 창조도시 건설 새만금 배후도시의 기능과 역할을 위한 물류교통 도시구축

일   반   현   황

□ 기     구

										도 시 개 발 과
도시행정					도시계획							도시개발				도시재생

□ 정․현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별							비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	계약
정 원	23	1	1	4	6	7	4
현 원	21	1	1	5	7	5	2
증 감	△2			1	1	△2	△2

□ 사 무 분 장

◦ 도시행정  :  국․과․소 행정 종합기획 및 예산편성, 개발행위 허가,

시특법 관련업무, 기반시설부담금 관리, 조기집행

◦ 도시계획 : 도시기본계획 및 도시관리계획 수립, 도시계획 시설결정,                    도시계획지구지정, 지구단위계획 수립, 도시계획위원회 운영

◦ 도시개발 : 도시계획 도로사업 추진, 자전거도로 계획수립 및 시행,                    도시개발사업 특별회계 관리

◦ 도시재생 : 구도심 특화거리 조성사업, 구도심 역세권 개발, 구도심                         민간 재개발사업 지원

□ 국토의 용도구분

(단위 : ㎢, %)

구 분	총 면 적	고 시 면 적				비 고
		도시지역	관 리 지 역	농림지역	자연환경 보존지역
면 적	506.925	76.090	214.713	194.143	21.979
비 율	100	15.0	42.4	38.3	4.3

□ 도시지역내 용도지역

(단위 : ㎢, %)

구 분	계	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	비고
면 적	76.090	17.771	1.869	10.542	45.908
비 율	100	23.3	2.5	13.9	60.3

□ 도시지역내 용도지구

(단위 : 천㎡)

지구명	계	미관지구	경관지구	방화지구	고도지구	자연취락 지 구	문화자원 보존지구	비 고
지구수	135	29	3	9	10	83	1
면 적	20,283	2,478	12,680	1,202	985	2,736	202

□ 도시계획시설 결정 및 집행현황

(단위 : 천㎡, %)

시설명		시설결정		집행시설		미집행시설		집행률
		개소	면적	개소	면적	개소	면적	(%)
총 계		2,030	30,841	1,635	26,495	395	4,346	86.0%
도로	소 계	1,507	11,205	1,156	9,914	351	1,291	88.5%
	광 로	5	1,259	4	1,155	1	104	91.7%
	대 로	64	3,274	44	2,891	20	383	88.3%
	중 로	330	3,946	278	3,590	52	356	91.0%
	소 로	1,108	2,726	830	2,278	278	448	83.6%
공원	소 계	95	5,578	76	3,002	19	2,576	53.8%
	근린공원	46	4,952	29	2,421	17	2,531	48.9%
	어린이공원	38	88	38	88	-	-	100.0%
	소 공 원	5	29	5	29	-	-	100.0%
	역사공원	2	76	1	51	1	25	66.2%
	문화공원	1	35	1	35	-	-	100.0%
	수변공원	2	28	1	8	1	20	30.2%
	묘지공원	1	370	1	370	-	-	100.0%
녹지	소 계	78	901	61	501	17	400	55.6%
	완충녹지	65	843	51	456	14	387	54.1%
	경관녹지	12	54	10	45	2	9	83.3%
	연결녹지	1	4	0	0	1	4	0.0%
기타	소 계	350	13,157	342	13,078	8	79	99.5%
	광 장	30	593	23	559	7	34	94.3%
	유원지	1	31	0	0	1	31	0.0%
	운동장	1	260	1	246	(1)	14	94.6%
	기 타	318	12,273	318	12,273	-	-	100.0%

□ 전문건설업 현황

◦ 업 체 별 :  523개업체(일반전문 423, 가스,난방100)

◦ 업 종 별

(단위 : 개소)

계	일 반 전 문							가스,난방
	소계	철콘	상하	토공	금속창호	기계	기타
523	423	80	76	34	35	25	173	100

□ 도시계획위원회

(단위 : 명)

분 야	계	시 청	의 회	교 수	건축사	도시계획기술사	일반인
인 원	23	2	2	14	1	1	3

◦ 교  수 :  14명 (전북대 6, 원광대 5, 군산대 2, 전주대 1)

◦ 일반인 :   5명 (도시계획기술사 1, 건축사 1, 연구원 1, 외부기관 1, 퇴직공무원 1)

◦ 의  회 :   2명

◦ 시  청 :   2명

2014 예산집행실적

【 2014. 06. 25현재 】                                         (단위 : 천원)

부서	정책	단위		세 부 사 업		예산액		집행액	잔 액	비 율	비고
도시개발과						24,447,610		11,098,839	13,348,771	45.4
	도시개발관리					24,233,453		10,971,424	13,262,029	44.9
		도시계획				2,055,637		202,833	1,852,804	9.9
				KTX익산역복합환승 센터개발사업		1,048,000		28,000	1,020,000	2.7
					일반운영비	12,000		5,500	6,500	45.8
					민간이전	36,000		22,500	13,500	62.5
					출자금	1,000,000		0	1,000,000	0	명시
				도시계획관리		779,485		67,470	712,015	8.7
					일반운영비	32,045		3,780	28,265	11.8
					여비	38,640		19,320	19,320	50.0
					업무추진비	8,800		5,000	3,800	56.8
					시설비및부대비	700,000		39,370	32,370	5.6
				구도심활성화사업		148,060		105,977	42,083	71.6
					일반운영비	8,550		6,170	2,380	72.1
					재료비	1,500		207	1,293	13.8
					시설비	91,468		63,058	28,410	69.0
							20,000	0	20,000		당해
							71,468	63,058	8,410		명시
					민간자본이전	46,542		36,542	10,000	78.5
				중앙동특화거리 (상징거리)조성사업		80,092		1,386	78,706	1.7	명시
		도시계획도로개설 (대로)				20,338,711		10,379,296	9,959,415	51.0
			KTX서부역사진입로확장사업			19,000,000		10,294,168	8,705,832	54.2
			산업도로확장공사(3공구)			392,171		2,773	389,398	0.7	계속비
			목천동원주A～우석장례예식장간도로확장			783,655		82,355	701,300	10.5	명시
			도농연결도로개설			10,103		0	10,103	0	계속비
			안전한보행환경조성사업			152,782		0	152,782	0	사고

부서	정책	단위	세 부 사 업		예산액		집행액	잔 액	비 율	비고
		도시계획도로개설 (중로)			305,126		17,819	287,307	5.8
			춘포면사무소~춘포역간도로개설		200,000		17,819	182,181	8.9
			석방육교~도축장간도로개설		79,432		0	79,432	0	명시
			인화스파리스~제이파크간도로개설		25,694		0	25,694	0	명시
		도시계획도로개설 (소로)			750,141		155,520	594,621	20.7
			어양동 부천초교옆도로개설		200,000		7,500	192,500	3.8
			미불용지보상		200,000		107,505	92,495	53.8
			영등동보람주유소~은혜교회간도로개설		350,141		40,515	309,626	11.6
						61,478	305	61,173		당해
						288,663	40,210	248,453		사고
		신규도시개발사업			650,000		201,310	448,690	31.0
				구)송학동사무소옆도로개설	100,000		100,000	0	100
				모현동E편한세상도로개설	150,000		101,310	48,690	67.5
				금강동도로개설공사	50,000		0	50,000	0
				마동EG@앞도로개설	350,000		0	350,000	0
						100,000	0	100,000		당해
						250,000	0	250,000		명시
		자전거도로정비			26,838		14,646	12,192	54.6
				자전거길유지관리	26,838		14,646	12,192	54.6
		재무활동			107,000		0	107,000	0
				통화금융기관차입금이자상환	107,000		0	107,000	0
	행정운영경비				32,956		22,740	10,216	69.0
		기본경비			26,446		18,520	7,926	70.0
		업무추진비			6,510		4,220	2,290	64.8
	특별회계				181,201		104,675	76,526	57.7
		남부지구정비사업			5,980		4,631	1,349	77.4
		장기미집행도시계획			175,221		100,044	75,177	57.0

2014 상반기 성과 및 반성

□ 성      과

◦ KTX 서부역사 진입로 확장사업에 대한 국고지원 확정

▸ 기획재정부 총사업비 조정승인 - 국고지원 219억 4천만원                     (국토교통부 50%, 한국철도시설공단 50%)

□ 반      성

◦ 도시계획도로 미개설사업에 대한 선택과 집중으로 신규사업 최대한          억제하고 예산 미확보사업 조기 마무리 필요

2014 주요업무 추진상황

		KTX서부역사 진입로확장사업 어양동 부천초교옆 도로개설 영등동보람주유소~은혜교회간 도로개설 춘포면사무소~춘포역간 도로개설 모현동e편한세상앞 도로개설 구)송학동사무소옆 도로개설 장기미집행 도시계획시설재검토 익산역 복합환승센터개발사업

1		KTX 서부역사 진입로 확장공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  :  익산시 송학동․모현동 일원

◦ 사업규모  :  L=500m , B=25m⇒50m

지하차도 Box 183m․ U-type 110m, B=19.7m

◦ 사업기간  :  2014. 1 ～ 2015. 12

◦ 총사업비  :  50,100백만원 (국비 21,940,  시비 28,160)

▸ 2014년 19,000,  금후 31,100

□ 상반기 추진실적

◦ KTX호남고속철도 제3-2공구 건설공사 시행(한국철도시설공단)

▸중앙지하차도공사 L=636.7m중 343.5m 시행	2009. 5. ～ 2014. 12.

◦ 장신～송학간 도로확장공사 착공(익산지방국토관리청)	2010. 12. 16.

▸L=1.6km중 1.16km 시행	2010.12. ～ 2015. 12.

◦ 서부역사진입로 확장사업 국가사업으로 추진건의(고충민원)	2013.  5. 28.

▸최삼열 외 31,513명/국민권익위원회, 청와대

◦ 국민권익위 현장실사 및 갈등조정 사전협의	2013. 8. 2. ～ 9. 13.

◦ 고충민원에 대한 관계기관 조정․합의서 서명	2013. 10. 29.

▸민원인대표, 국민권익위원장, 국토교통부차관, 익산시장, 철도시설공단이사장

※ 조정․합의서 내용

- 국토 교통부 : 중앙지하차도 구조물 및 상부 도로공사비 부담(293m)

- 익  산  시  : 사업구간(500m) 토지매입 및 도로연결공사 시행(207m)

- 철도시설공단 : 상기 합의사항이 이루어질 수 있도록 적극 협조

◦ 기획재정부 총사업비 조정승인(219.4억원 증액)	2014. 3. 7.

▸국토교통부 50%, 한국철도시설공단 50%

▸복합환승센터 사업을 철도 연계시설로 보고 지하차도 145m 국고지원

◦ 실시설계용역 추진(금회 발주구간 - 500m)	2014. 3. 24. ～ 7. 9.

◦ 한국철도시설공단 위․수탁 협약체결서 송부	2014. 6. 5.

◦ 토지 및 지장물 보상(금액대비 72%)	2014. 4. ～

□ 하반기 추진계획

◦ 용지보상 지속적 추진	2014. 7. ～

◦ 지방토지수용위원회 토지수용재결신청	2014. 7.

◦ 실시설계 용역준공	2014. 7.

◦ 공사감리 발주	2014. 7.

◦ 공사 발주	2014. 8.

2		어양 부천초교옆 도로개설

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  :  익산시 어양동 12-9번지 일원

◦ 사업규모  :  L=140m, B=6m

◦ 사업기간  :  2008. 12. ～ 2015. 12

◦ 총사업비  :  500백만원 (시비 - 공사비 150,  보상비 350)

▸ 기투자 300,  2014년 200

□ 상반기 추진실적

◦ 편입토지 및 지장물 보상  ⇒  64%	2010.  3. ～ 10.

▸13필지 787㎡ 중 8필지 505㎡

▸지장물 4건 중 4건 보상

◦ 실시설계 용역완료	2014.  6.

□ 하반기 추진계획

◦ 미매입토지 용지보상 협의	2014.  7. ~

◦ 공사추진	2014. 10. ~

3		영등동 보람주유소~은혜교회간 도로개설

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  :  익산시 영등동 일원

◦ 사업규모  :  L=166m, B=8~10m

◦ 사업기간  :  2005. 1. ～ 2014. 12.

◦ 총사업비  :  800백만원 (시비 - 공사비 200,  보상비 600)

▸ 기투자 739,  2014년 61,  금후 60

□ 상반기 추진실적

◦ 편입토지 및 지장물 보상  ⇒  84%	2010.  3. ～

▸13필지 1,384 중 12필지 1,160㎡

◦ 실시설계 용역완료	2013. 12.

◦ 공사발주	2013. 12.

◦ 편입토지 보상추가 (4필지 121㎡)	2014.  4.

◦ 공사준공	2014.  6.

□ 하반기 추진계획

◦ 부족 보상비 제1회 추경 반영 (60백만원)	2014. 8. ~

4		춘포면사무소~춘포역간 도로개설

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  :  익산시 춘포면 덕실리 일원

◦ 사업규모  :  L=185m,  B=12m

◦ 사업기간  :  2003. 1. ~ 2015. 12.

◦ 총사업비  :  1,200백만원 (시비 - 공사비 450,  보상비 750)

▸ 기투자 365,  2014년 200,  금후 635

□ 상반기 추진실적

◦ 편입토지 및 지장물 보상  ⇒  87%	2012.  5. ～

▸13필지 267㎡ 중 10필지 233㎡, 지장물 22동 중 19동 매입

◦ 편입지장물 폐기물처리 철거용역 추진 19동	2014.  6.

□ 하반기 추진계획

◦ 미매입 용지보상 협의	2014. 7. ～

◦ 지장물 철거 (19동)	2014. 7. ～ 10.

5		모현동 e편한세상 앞 도로개설

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  :  익산시 모현동1가 277-68번지 일원

◦ 사업규모  :  L=79m, B=6m

◦ 사업기간  :  2014. 1. ～ 2015. 12.

◦ 총사업비  :  230백만원 (시비 - 공사비 122,  보상비 108)

▸ 2014년 150,  금후 80

□ 상반기 추진실적

◦ 분할측량 실시	2014.  1.

◦ 편입토지 및 지장물 보상  87%	2014.  2. ~

▸ 3필지 112㎡중  2필지 97㎡

□ 하반기 추진계획

◦ 미매입토지 보상협의 (1필지 15㎡)	2014. 7. ~

6		구)송학동사무소 옆 도로개설

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  :  익산시 송학동 97-140번지 일원

◦ 사업규모  :  L=130m, B=6m

◦ 사업기간  :  2014. 1. ～ 2015. 12.

◦ 총사업비  :  290백만원(시비 - 공사비 161․보상비 129)

▸ 2014년 100,  금후 190

□ 상반기 추진실적

◦ 편입토지 감정평가 및 보상의뢰	2014. 2.

▸1필지 455㎡

◦ 편입토지 일부지분 보상완료 (354㎡/455㎡)	2014. 3.

□ 하반기 추진계획

◦ 미지급 보상비 제1회 추경 반영 (29백만원)	2014. 8. ~

▸공사비는 시재정 여건 등을 고려하여  ‘15년 본예산 반영 검토

7		장기미집행 도시계획시설 재검토

□ 사 업 개 요

◦ 목   적

▸ 장기미집행 도시계획시설에 대한 전반적 재검토를 통해 일몰제에 사전 대비하고자 함

- 장기미집행 도시계획시설 일몰제 : 도시계획시설 결정후(2000.7기산) 20년 이상    미집행 도시계획시설은 2020년부터 자동 해제되는 제도

◦ 대   상

▸ 익산시 도시계획시설 총2,030개 시설중 약14%인 395개 시설

※도로 351개 노선, 공원 19개소, 녹지 17개소, 기타 8개소

시설명	시설결정		집 행		미집행			미집행률
	개소	면적(천㎡)	개소	면적(천㎡)	개소	면적(천㎡)	구성
총 계	2,030	30,841	1,635	26,495	395	4,346	100%	14%
도 로	1,507	11,205	1,156	9,914	351	1,291	30%	12%
공 원	95	5,578	76	3,002	19	2,576	60%	46%
녹 지	78	901	61	501	17	400	9%	44%
기 타	350	13,157	342	13,078	8	79	1%	1%

◦ 주요내용

▸ 도시계획시설 기능 및 필요성, 재정여건 등을 감안한 변경(폐지)검토

▸ 단계별 집행계획 수립 및 의회 장기미집행 도시계획시설 현황보고

※ 의회 보고후 권고내용을 감안 2016년 재정비에서 도시관리계획 변경

□ 상반기 추진실적

◦ 도시계획시설 재검토 용역 착수	2014. 4

◦ 현황조사 및 기초자료 분석	2014. 5 ~ 6

□ 하반기 추진계획

◦ 타당성 분석 및 정비방안 수립	2014.  6 ~ 10

◦ 단계별 집행계획 수립	2014. 10 ~ 11

◦ 장기미집행시설 의회보고	2014. 11 ~ 12

◦ 도시관리계획 변경 추진(재정비)	2015. ~ 2016.

8		익산역 복합환승센터 개발사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  :  익산시 송학동 일원

◦ 사 업 비  :  287,902백만원

◦ 규    모  :  66,443㎡(20,099평), 연면적158,678㎡(48,000평)

◦ 도입시설  :  환승, 업무, 판매, 상업, 숙박, 주거시설 등

◦ 사업기간  :  2010. 10 ~ 2018. 12

◦ 우선협상대상자 : 한국자산신탁 컨소시엄

□ 상반기 추진실적

◦ 익산역 복합환승센터 개발계획 열람공고	2014. 02. 28

◦ 전북도 지방교통위원회 심의 완료	2014. 03. 26

□ 하반기 추진계획

◦ 계    획

▸복합환승센터 지정 승인(전북도, 국토교통부)	2014. 07.～2014. 10.

◦ 세부일정

▸지방교통위원회 심의 시 보완사항 제출(전북도)	2014. 07.

▸익산역 복합환승센터 지정 신청(전북도⇒국토교통부)	2014. 07.

▸익산역 복합환승센터 지정 승인(국토교통부)	2014. 10.

▸익산역 복합환승센터 지정 고시(전북도)	2014. 10.