2014.  7.

제177회 익산시의회(임시회)

― 2014 주요업무 보고 ―

상반기 결산 및 하반기 추진계획

건설교통국

보 고 순 서

□	일반현황	………	3
□	도시개발과	………	9
□	건설과	………	33
□	주택과	………	61
□	교통행정과	………	81
□	도로관리과	………	105
□	차량등록사업소	………	131

건설과

□	비전 및 중점과제
□	일 반 현 황
□	2014 예 산 집 행 실 적
□	2014 상반기 성과 및 반성
□	2014 주 요 업 무 추진상황
□	특수시책

건설과 비전과 중점과제

	목 표
아름답고 깨끗한 녹색도시 건설

		중 점 추 진 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	시민에게 다가서는 보상행정으로 양질의 서비스를 제공 도·농균형발전 및 거점개발 추진을 위한 도로시설 확충 환경을 우선으로 하는 생태하천조성으로 시민휴식공간 제공 장애인과 여성들을 배려한 시민중심의 밝고 안전한 거리조성

일   반   현   황

□ 기       구

											건 설 과
건설행정								도로시설					하천시설				하천관리							가로등관리

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별							비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	계약
정 원	24		1	6	9	7	1
현 원	22		1	6	10	5	0
증 감	△2				+1	△2	△1

□ 사 무 분 장

◦건설행정  : 국 소관사업 및 유관기관 용지매입, 토지수용 재결,

소유권이전 촉탁 및 상속등기, 기타 보상관련 업무전반.

◦도로시설  : 철도건널목 개량사업, 고속국도, 국도, 지방도 등 사업

관련협의 시․군도, 농어촌도로 확․포장사업 추진.

◦하천시설  : 하천 기본계획 수립, 지방하천 개량사업, 소하천 정비사업

◦하천관리  : 하천제방관리, 골재채취허가, 하천사용료 징수부과, 생태하천관리

◦가로등관리  : 가로등․보안등 시설종합계획, 유지보수관리, 생활민원.

□ 하 천 현 황

(단위:km)

구 분	총 연 장		하천정비기본계획수 립 현 황		정비대상	개수연장	미개수 연 장	개수율
	개 소	연 장	개 소	연 장
합 계	89	304.7	79	26.5	304.7	149.3	155.4	49%
국가하천	3	34.2	3	100	34.2	34.2		100%
지방하천	28	172.0	18	64	172.0	87.1	84.9	51%
소 하 천	58	98.5	58	98.5	98.5	38.7	59.8	39%

□ 하 천 점 용 허 가 현황(2014년)

필 지 수				면 적(㎡)
계	답	전	대지	계	답	전	대지
1,316	892	352	72	1,588,795	1,259,035	315,770	13,990

□ 가로등․보안등 현황

계	보 안 등	가 로 등
26,980등	17,889등	9,091등

□ 차량보유현황

가로등유지보수차량	하천관리 차량
98다1437 외 2대	91러7428 더불캡 1대, 오토바이 1대

2014 예산집행실적

【 2014. 6. 30. 현재 】 ※(본예산10,910백만원,이월5,405백만원, 추경성립전77백만원)   (단위: 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
건설과				16,392,398	8,066,948	8,325,450	50.0
	도로시설관리			7,492,372	2,681,436	4,810,936	36.0
		시·군도농어촌도로확·포장		800,880	137,021	663,859	17.1
			함라수동금곡간 도로확·포장	100,000	0	100,000	0
			여산신리호월간 도로확·포장	150,000	26,180	123,820	17.5
			오산북영선 도로확·포장	219,180	53,186	165,994	24.3	명시이월
			미불용지매입비	100,000	33,405	66,595	33.4
			함열용왕교차로~산업단지경계간도로확·포장	211,700	24,250	187,450	11.4	명시이월
			성당삼회선(성당우회도로)도로확·포장	20,000	0	20,000	0
		주민숙원사업		41,120	20,400	20,720	49.6
			국내여비	40,320	20,000	20,320	50.4
			시책추진업무추진비	800	400	400	50.0
		철도건널목입체화사업		3,696,570	1,125,217	2,571,353	30.4
			함열용성철도건널목입체화사업	2,623,039 (1,166,839)	106,207	2,518,666	4.0	계속사업
			황등지구철도건널목입체화사업	1,073,531 (73,531)	1,019,010	54,521	94.9	계속사업
		도로조명시설관리		2,953,802	1,398,798	1,555,004	47.3
			보안등신규설치	318,150 (2,500)	267,883	50,267	84.2	추경성립전예산
			노후가로등정비	117,000	43,963	76,326	37.6
			가로등,보안등 유지관리	2,422,782	1,074,178	1,354,276	44.3
			가로등보수차량 운영유지비	20,870	8,000	12,870	38.3
			주민편익증진사업(도비)	75,000	4,774	70,226	6.4	추경성립전예산

2014 예산집행실적

【 2014. 6. 30. 현재 】                                       (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
	하천정비			8,301,727	4,825,365	3,476,362	58.1
		하천정비 및 유지관리		8,301,727	4,825,365	3,476,362	58.1
			하천제방유지 보수(자체)	26,228	1,228	25,000	4.7
			하천제방유지보수	82,000	12,644	69,356	15.4
			소하천정비	3,012,056 (1,077,056)	1,628,711	1,383,345	54.1	명시이월
			산북천하천 환경정비사업	4,318,458 (1,818,458)	3,103,161	1,215,297	72.0	게속사업
			지방하천기본계획 용역수립	254,860 (194,860)	32,111	222,749	12.6	명시이월
			국가하천유지관리	608,125 (105,125)	47,510	560,615	8.0	명시이월
	하천재해예방			537,713	533,922	3,791	99.3
		하천재해예방		537,713	533,922	3,791	99.3	명시이월
			재해예방 사업	537,713	533,922	3,791	99.3	명시이월
	행정운영경비			60,586	26,225	34,361	43.3
			인력운영비	35,000	13,226	21,774	37.8
			기본경비	25,586	13,000	12,586	50.8

2014 상반기 성과 및 반성

□ 성      과

◦ 건설공사 편입용지 협의보상으로 공익사업 추진에 기여

▸사업지구 42개소(계속사업 33개소, 신규사업 9개소) 70%협의완료

▸KTX역사 진입로 용지등 보상 76%협의완료

◦ 자연과 생명이 살아 숨쉬는 친환경을 우선으로 하는 하천정비로        재해예방 및 시민 친수공간 조성

▸ 산북천 하천환경정비사업

- 자연석 쌓기 20,177㎡중 18,100㎡  - 제방도로 포장 12.7km중 6.8km

- 식생매트 13,727㎡

▸ 소하천 하천환경정비사업

- 택촌천 : 교량 2개소 설치, 낙차공 1개소 설치, 호안정비

- 신평천 : 교량 1개소 설치, 호안정비 260m완료

◦ 도로조명설치로 밝은거리 조성하여 여성,노약자 등에게 안전한 보행 도모

▸ 노후가로등정비 13개소, 보안등 신규설치 315개소

▸ 가로등,보안등 민원처리 1,844건(2013년 민원처리건수 3,935건)

2014 주요업무 추진상황

	□	공익사업을 위한 용지보상 철도건널목입체화사업(계속) 시․군도 농촌도로 확․포장사업(계속) 하천환경정비사업(산북천,소하천) 하천기본계획용역추진 국가하천유지관리사업 도로조명시설조도개선 도로조명 고장민원 신속처리 익산 I․C~팔봉간 지방도 확․포장

1		공익사업을 위한 용지보상

□ 사 업 개 요

구분	보상대상			보상실적				미보상 토지
	개소	필지	면적	개소	필지	면적	비율	개소	필지	면적
계	42	2,589	752,755	42	1,780	531,770	71%	42	809	220,985
도시개발과	15	427	76,054	15	271	38,776	51%	15	156	37,278
건 설 과	15	994	294,411	15	795	245,682	83%	15	199	48,729
도로관리과	3	23	1,899	3	5	118	6%	3	18	1,781
안전총괄과	6	358	125,677	6	232	105,831	84%	6	126	19,846
타 기 관	3	787	254,714	3	477	141,363	55%	3	310	113,351

※ 신규사업 9개소 (도시개발과 4, 건설과 1, 도로관리과 2, 안전총괄과 2)

※ 타기관 : 국토관리청, 전북도청 (도로공항과,도로관리사업소)

※ KTX역사 진입로 용지등 보상 - 당초 136필지 26,200㎡,19,000백만원

- 확정  93필지 11,291㎡ 17,322백만원

( 국·공유지 평가 제외)

□ 상반기 추진실적

◦ 토지매입실적 (70%)  :    42개소 /   1,780필지 /   531,770㎡

◦ 보상계획 열람공고  :      2개소 /     146필지 /    34,875㎡

◦ 감정평가 실시  :    14개소 /     270필지 /    79,549㎡

◦ 토지수용재결신청   :     1개소 /      25필지 /     3,017㎡

▸함열철도건널목입체화사업 - 전라북도청 (2014. 6. 20)

□ 하반기 추진계획

◦ 하반기 보상계획 : 42개노선 809필지–220,985㎡(20,573백만원)

◦ 지속적인 보상협의 추진(전담반구성 2개반 6명)    :   연중

◦ 개별방문, fax, 우편이용 보상협의 추진            :   연중

▸ 미 협의시 토지수용 등 절차이행

2		철도건널목 입체화사업(계속사업)

□ 사 업 개 요

◦ 함열용성 철도건널목 입체화사업

▸ 개    요 : 도로(L=1.58㎞, B=8~13m)  교량(1개소/140m)

▸ 사 업 비 : 18,170백만원(시설공단 13,627, 익산시 4,543)

▸ 공사기간 : 2010. 05. ~ 2014. 12.

▸ 시 행 청 : 익산시청         ▸ 현 공 정 : 92%

◦ 황등동연 철도건널목 입체화사업

▸ 개    요 : 도로(L=0.95㎞, B=15.4m)  지하차도(2개소/580m)

▸ 사 업 비 : 28,352백만원(시설공단 21,264, 익산시 7,088)

- 2014년까지 확보액 : 24,803백만원(시설공단 21,264, 익산시 3,539)

- 예산 미 확보액    :  3,549백만원(익산시 3,549)

▸ 공사기간 : 2010. 12 ~ 2015. 12

▸ 시 행 청 : 한국철도시설공단   ▸ 현 공 정 : 74%

□ 상반기 추진실적

◦ 함열용성 철도건널목 토지수용재결 신청(전북도)    :  2014.  6.

▸ 전라북도 지방토지수용위원회 토지수용재결 - 25필지 3,017.4㎡

◦ 황등동연 철도건널목 공사 추진                    : 2014.  3 ~ 6.

▸ 지하차도 BOX(15.9×5m) 30.5m, 옹벽구조물(U-TYPE) 60m

□ 하반기 추진계획

◦ 함열용성철도건널목 입체화사업  공사 완료         : 2014. 12.

▸ 도로포장, 교통안전시설, 가로등, 신호등 설치 등

◦ 황등동연 철도건널목 시비 분담금 추경예산 편성    : 2014. 8 ~ 9.

▸ 시비 분담금 추경예산 확보금액 – 3,549백만원

3		시․군도 농어촌도로 확․포장사업(계속)

□ 사 업 개 요

◦ 개       요 :  공사 2건(L=2.53km) , 설계 1건((L=1.4km)

◦ 위       치 :  익산시 여산면, 성당면, 함라면, 망성면

◦ 사   업  비 :  270백만원(3개사업)

▸ 여산 신리 ~ 호월간 도로확포장공사            :  150백만원

▸ 성당 삼회선(성당우회도로) 도로확포장 실시설계  :   20백만원

▸ 함라 수동 ~ 금곡간 도로확포장공사            :  100백만원

※ 추진중 사업(계속사업)

(단위 : 백만원)

노선수	사업량	총사업비	기투자	2014년	금후	비 고
20개	L=28.66㎞	38,302	6,918	270	31,114

□ 상반기 추진실적

◦ 여산 신리~호월간 토지매입 추진(43필지 7,413㎡)       : 2014. 1 ~ 6.

◦ 성당 삼회선(성당우회도로) 실시설계 용역 착수         : 2014. 3.

◦ 함라 수동~금곡간 도로확·포장공사 착공               :  2014. 6.

□ 하반기 추진계획

◦ 여산 신리~호월간 도로확포장공사 토지매입 추진    :  2014. 7~12.

◦ 성당 삼회선(성당우회도로) 실시설계 용역 준공       :  2014. 10.

◦ 함라 수동~금곡간 도로확포장 공사 준공            :  2014. 12.

시 ․ 군도 및 농어촌도로 사업추진현황(계속사업)

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	사업개요	예 산 액				추진실적	비 고
			총사업비	기투자	2014년 예산액	금후투자
	20개사업	L=28.66km B=8m	38,302	6,918	270	31,114
1	함라 수동~금곡간 도로확.포장	L=1.23km B=7~8m	2,056	694	100	1,262	용지 99%
2	오산 북영선 도로확.포장	L=1.73km B=8m	2,251	1,126		1,125	공사중 (30%)
3	여산 신리~호월간 도로확.포장	L=1.3km B=8m	1,438	189	150	1,099	용지 67%
4	삼성동 하나로~ 외화간도로확.포장	L=1.55km B=8m	3,180	730		2,450	용지 63%
5	오산 신수선 도로확.포장	L=1.5km B=7m	1,079	879		200	용지 93%
6	오산 장신~만석간 도로확.포장	L=1.6km B=8m	1,786	274		1,512	용지 87%
7	용동 삼정~두무간 도로확.포장	L=1.21km B=8m	1,847	76		1,771	용지 73%
8	함라 진등 진입로 개설	L=1.43km B=6.5m	1,063	145		918	용지 85%
9	함라 칠성~다은간 도로확.포장	L=1.0km B=6.5m	975	190		785	용지 85%
10	오산 모산선(신모선) 도로확.포장	L=1.87km B=6.5m	2,096	212		1,884	용지 85%
11	망성 군도10호~ 금지간 도로확.포장	L=1.2km B=8m	1,872	180		1,692	용지 66%
12	왕궁 군도26호선 도로확.포장	L=1.7km B=8m	2,970	577		2,393	용지 75%
13	망성 신성~관산간 도로확.포장	L=0.91km B=7m	1,365	306		1,059	용지 68%
14	금마 갈산~서편간 도로확.포장	L=1.6km B=8m	2,829	229		2,600	용지 45%
15	왕궁 가좌마을 진입로확.포장	L=0.7km B=8m	1,116	103		1,013	용지 63%
16	금마 누동~신촌간 도로확.포장	L=0.93km B=8m	1,411	405		1,006	용지 56%
17	왕궁 평화촌~평리간 도로확.포장	L=1.3km B=8m	3,445	180		3,265	용지 52%
18	왕궁 온수~시대간 (황암~상발)확.포장	L=3.0km B=8m	2,803	296		2,507	용지 57%
19	춘포 토다리~덕동간 도로확.포장	L=1.0km B=6.5m	2,220	127		2,093	용지 9%
20	성당 삼회선(성당우회도로) 도로 확포장공사	L=1.4km B=8.0m	500		20	480	실시설계

4		하천환경정비사업(산북천,소하천)

□ 사 업 개 요

◎ 산북천 하천환경정비사업

◦ 위    치 : 용안면 금강합류점 ~ 낭산면 죽청천 합류점

◦ 사업기간 : 2010 ~ 2015년(6년간)

◦ 총사업비 : 30,000백만원(국비 18,000  도비 6,000  시비 6,000)

▸ 2014년 예산 : 2,500백만원(국비 1,500  도비 500  시비 500)

◦ 사업내용 : 생태하천조성L=6.64km(교량 1개소, 호안정비 132,800㎡

제방포장 12.7km, 조경 등)

◎ 소하천 정비사업

구 분	택촌천 소하천정비공사	신평천 소하천정비공사
위 치 사업기간 사 업 비 사업내용 도 급 사	◦ 성당면 성당리 일원 ◦ 2012 ~ 2014년(3개년) ◦ 3,938백만원(국 1,969, 시 1,969) ▸2014년 - 1,100백만원 ◦ 소하천정비 L=1.04km ◦ (주)성웅종합건설(대표 박영자)	◦ 여산면 호산리 일원 ◦ 2013 ~ 2015년(3개년) ◦ 3,668백만원(국 1,834, 시 1,834) ▸2014년 - 810백만원 ◦ 소하천정비 L=1.07km ◦ (유)삼성종합건설(대표 한웅진)

□ 상반기 추진실적

◦ 산북천 하천정비사업(90%) - 1, 2공구 4차분 착공 및 준공        :  2014 03.

◦ 택촌천 소하천정비공사 - 3차분 착공 및 추진        :  2014. 02.

◦ 신평천 소하천정비공사 - 1차분 착공 및 추진         :  2014. 03.

□ 하반기 추진계획

◎ 산북천 하천환경정비사업

◦ 우기철 현장관리                        :  2014. 07. ~ 2014. 10.

▸ 기상특보 발효시 현장대리인 순찰

◦ 총사업비 조정하여 2015년 사업 마무리 추진

▸ 총사업비 26,000백만원(감 4,000 – 국비 2,400, 도비 800, 시비 800)

◦ 총사업비 조정 신청(전라북도 → 국토교통부)        :   2014. 09.

◎ 소하천 정비사업

◦ 택촌천 소하천정비공사 3차분 준공                 :   2014. 08.

◦ 신평천 소하천정비공사 1차분 준공                 :   2014. 10.

◦ 신평천 소하천정비공사 2차분 예산확보 추진

◦ 소방방재청 및 전라북도 국비지원 지속 건의   :  2014. 07. ~ 12.

5		하천기본계획 용역추진

□ 용 역 개 요

용 역 명	위 치	용역기간	용역비 (백만원)	용역개요	용역사
3개소			2,040	L=113.5km
익산천 하천기본계획	금마면~ 춘포면	‘13.02.~‘14.06.	480	L=14.0km	㈜이산 외1
고창천 하천기본계획	웅포면	‘14.01.~‘14.12.	60	L=1.0km	㈜동 운
소하천정비 종합계획	익산시 전 역	‘14.01.~‘15.12.	1,500 (500확보)	58개소 L=98.5km	㈜한국종합기술 외2

□ 상반기 추진실적

◦ 익산천 하천기본계획 용역 추진                       :   2014. 01.

◦ 고창천 하천기본계획 용역 착수                       :   2014. 04.

◦ 소하천정비종합계획 용역 1차분 착수                  :   2014. 04.

□ 하반기 추진계획

◦ 익산천, 고창천 하천기본계획 용역 준공                :  2014. 12.

◦ 소하천정비종합계획 용역 추진 및 준공(1차분)          :  2014. 10.

◦ 소하천정비종합계획 용역비 2차분 예산확보 추진

◦ 2015년 용역비 10억원 추가 확보                 :  2014. 07. ~ 12.

6		국가하천 유지관리 사업

□ 사 업 개 요

◦ 재    원 : 국비 100%

◦ 사 업 비 : 239백만원 ( 4대강 179  · 4대강외 60 )

▸ 국고보조금 교부 및 송금에 따른 사업비 변경(당초 427백만원)

◦ 대 상 지

▸ 국가하천 34.2Km ( 금강 21.26 ․ 만경강 10.4 ․ 강경천 2.54 )

▸ 용안 생태습지 : 670,000㎡ ( 200,000평 )

◦ 사업내용

▸ 치수시설 : 제방유지관리  (호안보수, 배수시설, 예초작업 등 )

▸ 친수시설 : 금강생태하천에 설치한 산책로, 체육시설, 주차장,

편의시설, 수목 등에 대해 유지관리시행

□ 상반기 추진실적

◦ 용안 생태습지 환경정비사업 (예초 및 제초작업) 시행 : 2014. 4.

▸ 환경정비사업 년 3회실시 (6월, 8월, 11월)

▸ 환경정비사업(1회) 시행 : 2014. 6.

◦ 용안 생태습지 정비사업 시행  :  2014. 4. ~ 6.

▸ 생태 하천내 산책로 정비공사 시행 및 완료

- 콘크리트포장 (A=465㎡), 배수관설치 (L=76m)

▸ 생태 하천내 체육시설 및 배수로정비공사 시행

- 고무블럭 재 포장 (A=400㎡), 배수관설치 (L=272m)

□ 하반기 추진계획

◦ 용안 생태습지내 체육시설 및 배수로정비공사 완료    : 2014. 7.

◦ 용안 생태습지 및 제방 예초 및 제초작업 시행(2, 3회) : 2014. 8.~11.

7		도로조명 시설 조도개선

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  : 익산시 일원

◦ 사 업 량  :  9개 사업

◦ 사 업 비  :  431.6백만원(시비)

◦ 사업기간  :  2014. 01. ~ 2014. 12.

◦ 도로조명 시설 조도개선 공사 내역

구 분	세부사업	사 업 개 요	예산 (천원)	비 고
합 계		9개 사업	431,650
보 안 등 신규설치	시민생활불편 해소사업	보안등 설치 11개소	10,500
	생활환경 개선사업	보안등 설치 216개소	209,100
	주민숙원사업	보안등 설치 113개소	95,550
노후가로등 정비	도심지역 도로조명 노후선로 정비	노후선로정비 30개소	30,000
	노후가로등점멸기교체	노후점멸기교체 5개소	22,500
	사업단지 및 자유지역 노후선로 정비	노후선로정비 20개소	20,000
	안전점검부적합 보안등시설보수	부적합시설보수65개소	26,000
	우기대비 가로등 부적합전기시설보수	부적합시설보수10개소	10,000
	북부권 고장 보안등 단가계약수리	고장단가계약	8,000

□ 상반기 추진실적

◦ 가로등․보안등 사업 예산집행    :   305백만원

◦ 보안등 신규설치                 :   315개소 설치완료

◦ 노후 가로등 정비                :   13개소 정비완료, 61개소 공사중

□ 하반기 추진계획

◦ 가로등․보안등 공사 현지조사    :  2014. 7.

◦ 가로등․보안등 공사 실시설계    :  2014. 8.

◦ 공사착공 및 준공                :  2014. 8 ~12

8		도로조명 고장민원 신속처리

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원

◦ 사 업 량 : 익산시 전체 가로등, 보안등

◦ 사업내용 : 도로조명 고장처리지역 분리로 민원 신속처리

▸ 가로등 및 남부권 보안등 자체처리

▸ 북부권(함열읍외 10개면) 보안등 단가계약

◦ 사업기간 : 2014. 01. ~ 2014. 12.

□ 상반기 추진실적

◦ 북부권 보안등 고장수리 단가계약             :   1월

◦ 가로등 보안등 민원접수 처리                 :   1월 ~ 현재

◦ 2014년도 생활민원 처리 현황

(2014년 6월말 기준)

구 분	설치수량	민원건수	처리 주체		비고
			자체	북부권 단가계약
합 계	26,980등	1,844	1,707	137
가로등	9,091등	668	668
보안등	17,889등	1,176	1039	137

◦ 2014년 하반기부터 북부권 보안등 고장수리 단가계약 사업비 부족으로       민원처리 지연예상

▸ 6월말 기준 사업비(8백만원) 100% 소진

□ 하반기 추진계획

◦ 단가계약 사업비 추가확보(추경)               :  2014. 7.

◦ 하반기 단가계약 발주                         :  2014. 8.

◦ 보안등 유지보수                              :  2014. 8. ~ 12.

9		익산 I.C～팔봉간 지방도 확․포장

□ 사 업 개 요

◦ 지방도(720호선, 722호선) 확․포장 : 총연장 8.64km, 4차선 ⇒ 6차선

◦ 세부내역

구 분	익 산 시	전 북 도	국토교통부
위 치	팔봉 인디안매장 ~ 덕기동 현대주유소	덕기동 현대주유소 ~ 국가식품클러스터	국가식품클러스터 ~ 익산 I.C
사업규모	L = 2.52km 4차선 ⇒ 6차선	L = 4.72km 4차선 ⇒ 6차선	L = 1.4km 4차선 ⇒ 6차선
사 업 비	110억원 (보상 48, 공사 62) ※ 기투자 71, 금후 39	645억원 (보상 153, 공사 492) ※ 기투자 91, 금후 554	263억원
사업기간	2010 ~ 2015	2007 ~ 2018	2013 ~ 2016
시 행 청	익산시 도시개발과	전북도청 도로공항과	익산지방국토관리청
추진사항	공사 1․2차분 완료	토지매입 43%	기본 및 실시설계

※ 익산국가식품클러스터 진입도로 건설 : 도로확․포장 4.1km ,  422억원

▸지방도(722호) : 1.4㎞, 4차로 ⇒ 6차로  263억원

▸군  도(19호)  : 2.7㎞, 2차로 ⇒ 4차로  159억원

□ 상반기 추진실적

◦ 익산 I.C~금마간 지방도 확․포장공사 토지매입 및 착공   :  2014. 1~6.

▸토지매입 - 전체 524필지 197,231㎡중 233필지 85,222㎡ 매입(43%)

◦ 익산국가식품클러스터 진입도로 확장공사 주민설명회   :  2014. 4.

□ 하반기 추진계획

◦ 익산 I.C~금마간 지방도 확․포장공사 추진         : 2014. 7. ~ 2014. 12.

◦ 익산국가식품클러스터 진입도로 확장공사 설계 추진   : 2014. 7. ~ 2015.  6.

특 수 시 책

	□	가로등시설 실명제 추진

1		가로등시설 실명제 추진(비예산)

□ 사 업 개 요

◦ 사업대상 : 가로등 분전함(351개소), 가로등(9,091개소)

◦ 사업내용 : 가로등시설물의 고유번호 부여

◦ 사업계획

▸ 가로등시설물 전수조사실시 및 자료 확보

- 자체인력(가로등담당 외 6명)활용으로 사업비 최소화

◦ 사업기간 : 2014. 1. ~ 2014. 12.

□ 상반기 추진실적

◦ 가로등시설물 현지 조사(자료 수집 및 확보)    :   2014. 1. ~ 6.

▸ 가로등 분전함 현지 조사 수량  :  180개소 /  358개소 (공정률 50%)

▸ 가로등주 현지조사 수량        : 3,824개소 / 9,091개소 (공정률 42%)

□ 하반기 추진계획

◦ 가로등시설물 현지조사           :  2014.  7. ~ 10.

◦ 통합자료 확보 및 고유번호 부여  :  2014. 11. ~ 12.

◦ 가로등시설물 관리번호 표찰 부착  :  2015년 본예산 확보예정(70백만원)

≪ 가로등시설물 관리번호 표찰 사진 ≫