2014.  7.

제177회 익산시의회(임시회)

― 2014 주요업무 보고 ―

상반기 결산 및 하반기 추진계획

전략산업국

경영개발과

□	비전 및 중점과제
□	일 반 현 황
□	2014 예 산 집 행 실 적
□	2014 상반기 성과 및 반성
□	2014 주 요 업 무 추진상황

경영개발과 비전과 중점과제

	비 전
기업이 필요로 하는 최고 ･ 최적의 산업용지 제공

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	산업단지 기반시설 구축으로 기업하기 좋은 도시환경 조성 맞춤형 전문산업단지 조성으로 지역 경쟁력 강화 공영개발 특별회계의 효율적 운영으로 재정의 건실화 추진

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	기업유치 촉진을 위한 산업단지 기반시설 조성 농촌지역 균형발전을 위한 전문농공단지 조성 공평한 보상업무 추진으로 행정신뢰도 제고

일   반   현   황

□ 기          구

					경영개발과
경영행정			용지보상					경영개발1				경영개발2

□ 정  ․  현   원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	14		1	5	5	3
현 원	14		1	4	5	4
증 감	-		-	△1	-	1

□ 사  무  분  장

◦ 경영 행정 : 공영개발사업 기획 및 조정, 공영개발사업 계약업무

공영개발특별회계 예산 및 자금운용

◦ 용지 보상 : 용지분양 계획수립 및 추진, 경영평가 분석, 용지매입 및 보상,

지적공부정리, 토지수용  및  공탁, 공유재산 관리

◦ 경영개발1 : 익산일반산업단지 진입도로 개설사업, 익산제3일반산업단지  폐수종말처리시설 증설사업

◦ 경영개발2 : 친환경 LED집적화단지, 신재생자원센터 주변 개발사업

2014 예산집행실적

【 2014. 6. 30. 현재 】                                      (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율(%)	비고
경 영 개 발 과				36,231,153	8,801,706	27,429,447	24.3
	영업비용			1,117,149	550,551	566,598	49.3
		일반관리비		1,117,149	550,551	566,598	49.3
			인건비	791,919	359,939	431,980	45.5
			직무수행경비	42,000	20,765	21,235	49.4
			일반운영비	36,031	19,648	16,383	54.5
			여비	33,280	19,305	13,975	58.0
			업무추진비	7,620	2,804	4,816	36.8
			복리후생비	14,112	5,586	8,526	39.6
			포상금	28,477	25,466	3,011	89.4
			연금부담금등	163,710	97,038	66,672	59.3
	재고자산취득			16,988,900	8,251,154	8,737,745	48.6
		용지조성사업비		13,353,260	5,768,365	7,584,895	43.2
			시설비및부대비	13,353,260	5,768,365	7,584,895	43.2
		재고자산건설자금이자		3,635,640	2,482,789	1,152,850	68.3
			차입금이자상환	3,635,640	2,482,789	1,152,850	68.3
	비유동부채상환금			18,000,000	0	18,000,000	0
		정부차입금 원금 상환		18,000,000	0	18,000,000	0
			차입금원금상환	18,000,000	0	18,000,000	0
	예비비			125,104	0	125,104	0
		예비비		125,104	0	125,104	0

2014  상반기 성과

□ 성      과

◦ 익산일반산업단지 진입도로 개설공사

▸공 사 추 진 : 2010. 3월/ 2016. 2월 준공예정 (현 공정률 39%)

▸공사 착공(3차) : 2014. 2월

▸토지 및 지장물 보상 추진 : 76% (대상 1,128필지 / 776천㎡)

⇒ 토지 708필지/ 589천㎡, 지장물 769건, 분묘 270기

◦ 친환경 LED집적화 단지

▸특수목적법인(SPC)설립 : 2014. 1월

▸환경,재해,교통협의 완료 : 새만금환경청, 전북도청

▸토지 및 지장물 보상 추진 : 49.6%(대상 187필지/276천㎡)

⇒ 토지 85필지/ 137천㎡, 지장물 43건, 분묘 83기, 영농보상 58건

2014 주요업무추진상황 추진상황

		익산일반산업단지 진입도로 개설공사 익산제3일반산업단지 폐수종말처리시설 증설사업 친환경LED집적화단지

1		익산일반산업단지 진입도로 개설공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산제3일반산업단지 (낭산면) ~ 연무 IC (논산시 연무읍)

◦ 사업내용 : 도로신설 L=11.86㎞ (4차로), 교량신설 19개소 (1,245m)

◦ 사업기간 : 2010 ~ 2016 (7년)

◦ 총사업비 : 1,604억원 (공사비 1,187 보상비 등 417)

※ 재 원 별 : 국비 809, 도비 27, 시비 768

※ 현 공정율 :  39%

□ 예산현황

(단위 : 억원)

구 분	총 계	2013년이전	2014년			2015년	2016년 이후
			소계	확보	미확보
총계	1,604	677	374	216	158	260	293
국비	809(51%)	583	216	216		10	0
도비	27(1%)	27
시비	768(48%)	67	158	0	158	250	293

※ 현재까지 확보액 893억(국비 799억, 도비 27억, 시비 67억)

□ 상반기 추진실적

◦ 공사 착공 (3차분)	2014.  2.

◦ 감리용역 착수 (3차분)	2014.  2.

◦ 토지 및 지장물 감정평가	2014.  5.

◦ 용지 및 지장물 보상(76%)	2014.  6.

□ 문제점 및 대책

◦ 현재 국비 지원금액 809억원중 799억원이 지원되었으나 지방비는 부담금 795억원중 94억원만 확보된 실정으로 시비 미 부담금 701억원에 대한 지원 대책이 필요함.

◦ 시비 부담금 701억원을 국비로 전환하기 위해 기획재정부와  협의중에 있으나 불투명한 상태임.  (정치권등 다각적으로 협조가 필요함)

◦ 토지 보상비 미확보로 공사 추진 지난

▸ 현재 보상율 : 76% (대상 776천㎡ / 보상 589천㎡)

▸ 토지보상비 미 확보액 : 43억원

※ 우선 토지보상 완료를 위하여 토지보상비(43억원) 확보가 절실히 필요한 실정임

□ 하반기 추진계획

◦ 공사 준공 (3차분)	2014.  10

◦ 감리용역 준공 (3차분)	2014.  10

◦ 용지 및 지장물 보상(85%)	2014.  12

2		익산제3일반산업단지 폐수종말처리시설 증설사업

□ 사 업 개 요

◦ 위     치 : 익산제3일반산업단지 폐수종말처리장 내

◦ 사업 내용 : 폐수처리장 (2,500톤/ 일) 증설, 총인처리시설, 부대시설

◦ 사업 기간 : 2013 ~ 2015 (3년)

◦ 총사 업 비 : 107억원 (국비 75, 시비 32)

□ 그간 추진사항

◦ 1단계 폐수처리장(5,500톤/일) 준공 : 2013. 8. 20.

◦ 2단계 폐수처리장(2,500톤/일) 실시설계 용역착수 : 2013. 7. 18.

◦ 2단계 폐수처리장(2,500톤/일) 용역중지 : 2013. 10. 30.

▸ 중지사유 : 산업단지 입주기업의 폐수배출량이 1단계로 완료한

5,500톤/일 대비 60%미만임

□ 문제점 및 대책

◦ 환경부 폐수처리시설 국비지원 기준에 산업단지내 입주한 기업의 폐수

배출량이 폐수종말처리시설(5,500톤/일)용량의 60%이상 발생시 국비지원 하도록 되어 있으나 현재 폐수발생량이 500톤/일 정도 발생함.

□ 하반기 추진계획

◦ 산업단지 미분양 용지에 대한 조속한 기업유치 추진

3		친환경 LED집적화단지

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 함열읍․용안면 일원

◦ 사업규모 : 329천㎡

◦ 사업내용 : LED전문산업단지 조성

◦ 사업기간 : 2011 ~ 2016 (6년)

◦ 총사업비 : 350억원 (SPC)

▸ 민간 313억, 국비 30억, 도비 5억, 시비(출자금) 2억

□ 상반기 추진실적

◦ 특수목적법인(익산엘이디협동화단지개발주식회사)설립	2014.  1

◦ 단지지정 및 개발계획 승인신청(익산시→전북도)	2014.  4

◦ 환경, 재해, 교통협의 완료(새만금환경청, 전북도청)	2014. 5 ~ 6

◦ 용지매입(187필지 276천㎡ 중 85필지 137천㎡, 49.6%)	2014.  6

□ 하반기 추진계획

◦ 농공(전문)단지 실시계획 인가

◦ 사업 착공