2014.  7.

제177회 익산시의회(임시회)

― 2014 주요업무 보고 ―

상반기 결산 및 하반기 추진계획

전략산업국

한류패션지원과

□	비전 및 중점과제
□	일 반 현 황
□	2014 예 산 집 행 실 적
□	2014 상 반 기 성 과
□	2014 주요 업무 추진 상황
□	특수시책

한류패션지원과 비전과 중점과제

	비 전
한류패션산업을 선도하는 명품도시 익산

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	패션주얼리산업 고부가가치화 귀금속보석산업 성장과 발전 한류패션문화산업 육성과 발전

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	U턴 패션주얼리기업 유치 확대 및 조기정착 지원 귀금속보석 및 주얼리산업의 집적화를 위한 클러스터 (유통, 마케팅, 전시, 판매, 관광) 구축으로 경쟁력 강화 새로운 추가 업종(토탈패션 등) 유턴업체 발굴 및 유치

일   반   현   황

□ 기          구

															한류패션지원과
한류패션정책																									한류패션조성

□ 정  ․  현  원

(정원/현원)

구 분	계	직 급 별							비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	계약
정 원	9		1	3	3	2
현 원	10		1	4	4	1
증 감	1			1	1	△1

□ 사  무  분  장

◦ 한류패션정책  :  한류유턴기업 발굴 및 보석산업 육성

▸ 한류유턴기업 지원정책 개발

▸ 귀금속보석산업 고도화사업 추진

▸ 왕궁 가공단지 및 영등동 귀금속 1,2단지 지원

▸ 주얼팰리스 운영 및 보석축제 지원

◦ 한류패션조성  :  한류유턴기업 유치 및 지원

▸ 주얼리 유턴기업 조기정착지원

▸ 패션주얼리 공동연구개발센터 건립

▸ 주얼리 유턴기업 인력지원

2014 예산집행실적

【 2014. 6. 30. 현재 】                                       (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율(%)	비고
한 류 패 션 지 원 과				23,583,809	5,896,371	17,687,438	25.0
	한류패션산업조성			23,571,147	5,891,314	17,679,833	25.0
		보석산업도약과발전		6,494,052	409,770	6,084,282	6.3
			귀금속보석산업 활성화지원	72,760	42,545	30,215	58.8	명시 10,732
			익산귀금속보석 전시판매센터관리	104,000	99,300	4,700	95.5
			귀금속보석산업 고도화육성	5,805,000	225,164	5,579,836	3.9	계속비 2,700,000
			보석테마관광지 주차장조성사업	512,292	42,761	469,531	8.3	사고 512,292
		유턴기업지원		17,077,095	5,481,544	11,595,551	32.1
			중국 주얼리 유턴기업 공동R&D시설 구축	13,442,170	4,278,021	9,164,149	31.8	명시 13,442,170
			한류패션유치및지원	1,022,795	29,950	992,845	3
			쥬얼리유턴기업 인력양성사업	490,000	122,995	367,005	25.1	명시 300,000
			익산패션주얼리 공동R&D센터 운영	622,130	560	621,570	0.1
			유턴기업 주얼리 집적산업센터건립	1,500,000	1,050,018	449,982	70
	행정운영경비			12,662	5,057	7,605	40
		기본경비		12,662	5,057	7,605	40
			기본경비	12,662	5,057	7,605	40

2014  상반기 성과

□ 성      과

◦ U턴기업 유치활동 전개

▸ 선도기업 생산공장 착공 : 9개기업

▸ 투자유치활동 : 200여업체(중국, 일본, 베트남 등 해외진출기업)

- 메이저기업 30개, 협력업체 170개

▸ 주얼리 집적산업센터 입주 희망업체 의향서 접수 : 127개기업

◦ U턴기업 지원사업 추진

▸ 익산패션주얼리 공동연구개발센터 : ’14. 7월 완공예정

▸ 주얼리 집적산업센터 : 기본 및 실시설계중

▸ 주얼리 U턴기업 맞춤인력 양성 : 기능인력 108명 교육실시

◦ 귀금속 보석산업 활성화사업 추진

▸ 귀금속보석산업 고도화육성사업 : 기본 및 실시설계 용역 중

▸ 왕궁보석가공단지 매각 추진

- 지구단위계획 및 공유재산 취득승인 변경, 매각공고

▸ 왕궁보석테마관광지주차장 조성사업 : 공사진행중

◦ 귀금속 보석산업 발전방안 모색 및 지원

▸ 익산귀금속보석산업발전협의회 개최 : 2회

▸ 주얼팰리스 관리, 보석대축제 지원 및 홍보 실시

2014 주요업무 추진상황

		U턴기업 유치확대 익산패션주얼리 공동연구개발센터 운영 주얼리 집적산업센터 건립 주얼리 U턴기업 맞춤인력양성 귀금속보석산업 고도화육성사업

1		U턴기업 유치 확대

□ 사 업 개 요

◦ 유치목표 : 300개 업체 이상

▸1단계(2012~2013)  - 주얼리전용단지 조성 / 9개 업체 착공

패션주얼리 공동연구개발센터 건립

▸2단계(2014~2015)  - 집적산업센터 건립   / 50개 업체 유치

▸3단계(2016 이후)  - U턴 전용산단 조성   / 250개 업체 유치

□ 상반기 추진실적

◦ U턴기업 유치활동

▸ 주얼리기업 해외진출현황

계	중국	일본	동남아	비고
500개	400개	50개	50개

참고) 중국진출 한국주얼리기업의 경우 칭다오지역에 90%이상이 소재

일본진출 한국주얼리기업은 고후지역에 파인주얼리기업 소재

▸ 대표자 및 관계자 투자유치활동 : 200여 업체(중국, 일본, 베트남 등)

- 메이저기업 30개, 협력업체 170개

◦ U턴기업 투자협약 체결                              :  24개 기업

▸ 생산공장 착공 등 – 9개 기업

◦ 주얼리집적산업센터 입주 희망 의향서 접수           : 127개 기업

□ 하반기 추진계획

◦ 중국진출 주얼리기업 지속적 유치활동 전개          :  2014. 7. ~

▸ 메이저기업 20개 적극 유치활동 추진

◦ 한류패션산업 발전을 위한 U턴 대상 품목 확대

▸ 섬유, 가방산업 등

◦ 일본, 동남아 등 유치활동지역 다변화

▸ 베트남 진출 기업 여건 악화에 따른 반대급부적 상황 활용

▸ 일본진출기업 연계 주얼리제품 판매 등 다각적 협력방안 모색

◦ 국내복귀기업의 성공적인 정착을 위해 빅바이어 간담회 추진

▸ 세계적인 최대 패션시장인 홍콩주얼리쇼(9월) 연계, 거물급 바이어 연결

2		익산 패션주얼리 공동연구개발센터 운영

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 낭산면 구평리 1547

◦ 사 업 비 : 18,166백만원(국비 11,700 도비 4,330 시비 2,136)

◦ 사업규모 : 부지면적 13,441.9㎡, 건물연면적 5,472.32㎡

▸ 연구시설 : 습식도금, 이온도금, 금형․다이케스팅, 실험실

▸ 지원시설 : 사무실, 디자인연구실, 세미나실, 취업지도실 등

◦ 운영방법 : 민간위탁(한국주얼리 협동조합)

▸ 운영근거 : 익산시 패션주얼리 공동연구개발센터 설치 및 운영에 관한 조례 제5조

▸ 위탁기간 : ’14. 5. 1. ~ ’17. 4. 30. (3년)

▸ 위 탁 비 : 621백만원(시비, ’14년)

◦ 운영방향

▸ 공동연구개발센터 운영에 따른 최소한의 경비 지원

▸ 도금장 운영 및 중앙부처 공모사업 공모를 통한 자립예산확보 도모

□ 상반기 추진실적

◦ 시의회 민간위탁 동의	: 2014.  2. 21.

◦ 민간위탁 협약체결(한국주얼리협동조합)	: 2014.  4. 25.

◦ 민간위탁 시행	: 2014.  5.  1. ~

□ 하반기 추진계획

◦ 조례개정	: 2014.  7.

◦ 장비구축 완료(도금, 실험실, 금형․다이케스팅 등)	: 2014.  7.

◦ 건축 준공	: 2014.  7.

◦ 시험가동 및 정상가동	: 2014.  7.

3		주얼리 집적산업센터 건립

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산제3일반산업단지 주얼리공단(낭산면 구평리 1519번지)

◦ 사업기간 : 2014. ~ 2015.(2년)

◦ 사 업 비 : 12,290백만원(국비5,690, 도비2,845, 시비3,755)

◦ 사업규모 : 부지면적 7,340㎡, 건물연면적 10,000㎡

◦ 사업내용 : 협력업체․원부자재상가 입주공간 및 지원시설 건립을 통한

주얼리 인프라 구축

□ 상반기 추진실적

◦ 사업수행능력평가                          :  2014.  2.  ~  2014.  3.

◦ 설계업체선정                              :  2014.  4.

◦ 기본 및 실시설계                          :  2014.  5.  ~  2014. 10.

□ 하반기 추진계획

◦ 시공자 및 감리자 선정                     :  2014. 10.  ~  2014. 11.

◦ 공사기간                                  :  2014. 11.  ~  2015. 10.

4		주얼리 U턴기업 맞춤인력양성

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 2013. 9. ~ 2014. 12.

◦ 사 업 비 : 300백만원(도비 90, 시비 210)

◦ 교육인원 : 240명(익산시에 주소를 둔 만 18세~49세 미취업자)

▸ 2개월 과정, 3회 교육 실시

◦ 교육기관 : 관내 직업능력 개발 훈련 시설(폴리텍대학Ⅴ대학, 직업전문학교 등)

◦ 교육내용 : 단순 기능사 과정(세공, 금형 등) 인력 양성

◦ 추진체계

구 분	역 할	비고
익 산 시	업체 수요 조사 , 사업비 지원, 취업 지원
교육기관	교육생 모집선발, 교육 과정 개발 및 실시, 교육생 취업 관리
업 체	교육생 우선 채용 및 수요 정보 제공

□ 상반기 추진실적

◦ 기능인력 교육 실시

▸ 인 원 : 108명(폴리텍 16, 성심 62, 애림 30)

▸ 기 간 : 2013. 9. ~ 2014. 5.

□ 하반기 추진계획

◦ 인력수요조사    --------------------------------------  연 중

◦ 기능인력 교육 실시(3회)  -----------------------------  2014. 12

◦ 교육기관 지도 점검  ----------------------------------  수 시

◦ 교육수료 후 취업연계 지원 ----------------------------  2014. 12.

◦ 결과보고 및 정산  ------------------------------------  2014. 12.

5		귀금속보석산업 고도화육성사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 왕궁면 동용리 보석가공단지 내

◦ 사업기간 : 2012. ~ 2016.(5년)

◦ 사 업 비 : 19,300백만원(국비 13,700,  시비 5,600)

◦ 사업규모 : 부지면적 12,734㎡, 건물연면적 8,100㎡

◦ 사업내용 : 아파트형 표준공장 3,200㎡, 디자인․기술지원센터 4,900㎡

◦ 연도별 사업비내역

(단위 : 백만원)

구 분	‘12년	‘13년	‘14년	‘15년	‘16년	계
국 비	1,000	500	1,705	5,200	5,295	13,700
지방비(시비)	700	500	1,400	1,400	1,600	5,600
합 계	1,700	1,000	3,105	6,600	6,895	19,300

□ 상반기 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 용역 착수	: 2014.  2.

□ 하반기 추진계획

◦ 기본 및 실시설계 용역 완료	: 2014.  7.

◦ 아파트형 공장 및 디자인기술지원센터 착공	: 2014.  8.

특 수 시 책

	□	익산 주얼리제품 명품화 전략사업

1		익산 주얼리제품 명품화 전략사업

□ 사 업 개 요

◦ 귀금속보석 제작 익산명인 지정

▸ 시행시기 : 2014년 하반기

▸ 대상인력 : 익산시에 주소지가 등록된 기능인력(세공, 연마 등)

▸ 지정방법 : 전국규모대회*에서 수상 경력이 있는 사람 중 심사하여 지정

*전국기능경기대회, 한국귀금속공예기술경기대회 등

▸ 소요예산 : 5백만원(’14. 1회추경 요구예정)

◦ 귀금속보석 우수 제조업체 인증

▸ 시행시기 : ’14년 하반기

▸ 대상업체 : 관내 소재 주얼리 제조업체 (파인주얼리, 패션주얼리, 공예제품 등)

▸ 지정방법 : 세부 사업계획 및 평가방법 별도 정함(서면*, 현장 실사 등)

*각종 공부 (납세, 고용, 매출액, 장비 보유, 특허출원 등)

▸ 소요예산 : 5백만원(’14. 1회추경 요구예정)

□ 금 후 계 획

◦ 세부시행계획(안) 확정                           : 2014.  7.

◦ 사업계획 공고(홈페이지, 현수막 등)               : 2014.  8.

◦ 사업예산(행사 운영비, 평가 수당, 지정패 등) 확보      : 2014. 제1회 추경

◦ 사업 시행 및 지정 업체와 지정 명인 등 확정 공고  : 2014. 11.