2014. 9.

제179회 익산시의회(제1차 정례회)

2014행정사무감사자료

상하수도사업단

순     서

□	상 수 관 리 과	………	3
□	하 수 관 리 과	………	49

하 수 관 리 과

	□		감사자료 과 공통사항
				1.	2013년도 업무성과 및 반성 …………………………	5
				2.	2013년도 예산집행 및 추진사항 ………………	6
				3.	2013년도행정사무감사시 지적사항에 대한 조치 결과 …	8
				4.	2013년도 상급기관 감사시 지적사항 및 조치 결과 …	11
				5.	시정질문에 대한 조치결과 ……………………	12
				6.	주요사업 조서(3천만원 이상) ………………	14
				7.	2013년 각종 민원(진정.건의.청원 등) 접수 처리내역 …	16
				8.	기금 운용 관련 …………………………………	16
				9.	위원회(자문위원회 포함) 운영 관련 …………	16
				10.	용역사업 관련 …………………………………	17
				11.	각종 민간사회단체 보조금지원 관련 …………	19
				12.	인․허가 민원관련 ………………………………	19
				13.	각종공사 설계 변경상황 ………………………	20
				14.	건설공사 집행 현황(3천만원 이상) …………	22
				15	중소기업진흥 및 제품 구매 촉진에 관한 법률에 의한 물품구입현황(3천만원이상)	24
				16.	민간에 대한 보조금 집행 내역 ………………	25
				17.	국․도비 보조사업 집행현황(1억원 이상) …	26
				18.	명시 및 사고이월사업비 집행 내역 …………	27
				19.	예산전용 사항 및 예비비 집행 현황 …………	28
				20	공사 준공기한 연장 내역 ………………………	28
				21.	국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황	28
				22.	국․도비 반납 현황(항목별 반납사유 명시) …	29
				23.	2013년도 계획사업중 미착공사업 현황 ………	29
				24.	2013년도 계획사업중 유보 및 취소된 사업현황…	29
				25.	2013년도 이월사업중 유보 및 취소된 사업 …	30
				26.	2013년도 예산편성후 전액 미집행 내역 ……	30
				27.	소송 사건 현황 …………………………………	31
				28.	시홈페이지에서 접수된 민원처리 현황 ………	32
				29.	각종 보조급 지급내역………………………	33

하 수 관 리 과

	□		감사자료 과 요구사항
				1.	하수도사업 공기업 운영 사항 ……………………	35
				2.	하수도요금 부과징수 및 체납액 현황……………… ▶ 20위까지 과세물건 표시	37
				3.	하수도사업 채무 및 상환계획(상환조건, 기간 등)…	39
				4.	09 하수관거 임대형 민자사업(BTL) 추진현황……	40
				5.	함열․춘포 처리구역 하수관거 정비사업 ……………	41
				6.	합류식 하수도 월류수(CSOs)처리시설 설치사업 …	42
				7.	유천 생태습지 및 생태하천 복원사업…………………	43
				8.	공공하수처리장 총인 및 질소처리시설 설치사업	44
				9.	하수슬러지 자원화시설 설치사업 …………………	45
				10.	금강분뇨처리장 철거사업 ……………………………	46
				11	하수처리시설 운영관리 ………………………………	47
				12	하수도사업관련 각종 용역 추진사항 ………………	49
				13	읍․면․동 하수도시설공사 추진현황 ………………	51

감사자료 과 공통사항

1. 2013년도 업무성과 및 반성

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수행정담당		최 용 식	□

□ 성      과

◦ 하수처리구역 오․우수관 분리로 하수처리시설 효율개선 및 쾌적한 생활환경 조성

▸ ‘09BTL 사업 및 함열․춘포처리구역 하수관거 정비사업 추진

⇒ 관거정비 42km,  배수설비 3,100개소

◦ 공공하수처리장 최적운영을 통한 수질환경개선 및 공중위생향상

▸ 총27개소(139,521㎥/일) 하수처리시설의 정상가동 및 유지관리

▸ 수질자동측정장치(TMS)를 통한 방류수질 실시간 감시제어

▸ 하수처리시설 개선공사를 통한 처리효율 향상 및 수질오염 저감

⇒ 익산총인처리시설 및 개량공사 완료

⇒ 익산북부․금마총인처리시설 설치공사 완료

▸ 오염물질 부하량 삭감을 통한 수질환경 개선 : BOD(130mg/ℓ→5mg/ℓ)

◦ 유천생태습지 및 생태하천복원사업 시행으로 수질향상 및 친수문화공간 조성

▸ 기초시설 밀집지역 수질 및 환경개선을 위한 본격적인 공사 추진

⇒ 생태습지내 수로조성 및 강관압입추진 완료

▸ 사업부지 일부 제척(6,600㎡) 공공용지로 전환(주민센터 등)

▸ 지역주민 선진지 견학 의견수렴 사업추진

▸ 주민센터 공공용지 확보, 선진시설물 도입, 하천폭 축소 등 설계변경 시행

◦ 읍면동 소규모 하수도시설공사 시행으로 생활주변 환경개선 및 재해예방              ▸ 침수피해와 악취발생지역 하수도정비 및 준설공사 추진

⇒ 하수도정비 L=10㎞, 하수도기계준설 1,800㎥

◦ 하수관거 누수, 파손 등 생활민원 신속 처리로 신뢰받는 하수행정 구현                ▸ 365일 누수없는 비상대기 근무로 2,200건의 하수생활민원 처리

▸ 원활한 하수배제 및 도로평탄성 향상을 위하여 하수맨홀 단차조정

⇒ 250개소

□ 반      성

◦ 하수관거 공사에 따른 시민 불편 초래

▸ 공사전 안내현수막 게시 및 주민간담회를 통해 하수관거 공사 홍보를

지속적으로 추진하였으나 구간별 복구지연으로 주민불편 초래

2. 2013예산집행 및 추진사항

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수행정담당		최 용 식	□

□ 세      입

(단위 : 백만원)

과 목		예 산 액	세 입 액	비율(%)	비 고
합 계		58,572	60,020	102.4
수익적 수 입	소 계	20,529	21,773	106.0
	사 용 료 수 입	9,222	10,349	112.2
	기 타 영 업 수 익	502	439	87.4
	수 입 이 자 및 배 당 금	625	764	122.2
	타회계전입금수익	10,154	10,154	100.0
	기 본 재 산 임 대 수 익
	잡 수 익	26	67	257.6
자본적 수 입	소 계	38,043	38,247	100.5
	자산매각수입
	시설분담금	1,400	1,555	111
	타회계건설보조금	23,941	23,941	100
	기타자본적수입	12,702	12,751	100.3

□ 세     출

(단위 : 백만원)

과 목		예 산 액	집 행 액	비율(%)	비 고
합 계		58,572	44,497	75.9
수익적지 출	소 계	25,190	23,603	93.6
	관 거 비	8,198	8,074	98.4
	펌 프 장 비	117	114	97.4
	처 리 장 비	13,559	13,268	97.8
	일 반 관 리 비	2,293	2,124	92.6
	중앙정부차입금이자상환	23	23	100
	특별손실
	예 비 비	1,000	0	0
자본적지 출	소 계	33,382	20,894	62.5
	가 동 설 비 자 산	10,425	6,981	66.9
	비가동설비자산	19,618	13,676	69.7
	고정부채상환금	177	177	100.0
	민 간 자 본 이 전
	기타자본적지출(충당금)	60	60	100.0
	예 비 비	3,102	0	0

3. 2013년도행정사무감사시 지적사항에 대한 조치결과

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수행정담당		최 용 식	□
작성자	:	하수시설담당		이 정 노	□
작성자	:	하수운영담당		서 정 인	□

○ 총6건/ 완료6건

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과	비고
1	•시홈페이지 민원처리와 관련하여 ▸하수관거 공사등으로 굴착된 도로를 장기간 임시포장으로 요철발생으로 차량 및 보행자들에 많은 불편과 위험요소가 발생되고 있어 각종 하수시설 공사 후 굴착된 도로등에 대하여 조속한 원상복구로 차량,오토바이,보행자통행등에 불편이 없도록 철저를 기하기 바람	▸BTL공사등 하수관거공사로 임시포장구간에 대하여 본포장완료시까지 주기적으로 점검을 실시,요철구간에 대하여 복구를 시행하여 차량,보행자 통행에 불편이 없도록 하였음
2	•사용료 체납액과 관련하여 ▸하수도사용료 체납액 상위20위에 대한 징수방안을 마련하고 고액체납자 한제임스본드3건, 김순자2건, 정인동2건등 고질체납자에 대하여는 효과적으로 징수할 수 있도록 상수관리과 협의 특단의 조치를 강구하기 바람 ▸고질체납자중엔 임의경매가 이루어지는곳도 있는데 압류만 하지 말고 강력한 후속조치를 하기 바람	▸고액체납자 김순자2건, 정인동2건에 대하여 재산조회 및 압류물건의 과세표준액 파악 등을 통하여 2013.6 결손처분완료 ▸고액체납자 한제임스본드의 경우 임의경매진행으로 비승계 되어, 향후 재산조회등을 통해 발견시 상수관리과 협조로 압류 등 적극적인 조치를 추진하겠음 ▸고질체납자에 대한 꾸준한 관리와 상수관리과와의 협의를 통하여 체납액을 적극징수 할 수 도록 조치를 취하고 있음.

연번

시정․개선사항

조치(처리)결과

비고

3

유천생태습지사업과 관련하여

▸지역주민의 의구심을 이해하고 주민이 함께 참여할 수 있도록 하여 주민들의 요구가 해소되고 자연생태계가 친환경적으로 변화되고 악취문제도 해결될 수 있도록 사업추진에 만전을 기하기 바람

▸동산동 주민 명예감독관 임명등으로 주민과 소통할수 있게 하고 있으며 친환경적으로 사업을 추진중에 있음.

4

•하수도요금 현실화와 관련하여

▸버리는 물에 대한 인식부족을 일깨우기 위한 하수도사용료 현실화를 적극적으로 추진하기 바람

3차례 하수도사용료 인상(2012.2월, 2012.7월, 2013.1)을 하여 하수도 사용료 현실화를 적극 추진하고 있음.

5

•총인처리시설 설치사업 관련하여

▸총인처리시설설치사업이 공정이 지켜지지 않아 과태료처분을 받은 것으로 알고있음. 앞으로는 이런일이 발생하지 않도록 관리감독을 철저히 하기바람람.

▸ 총인처리시설 개선기간 연장완료

처리장명	당초	변경
익산처리장	‘13.02.28	‘13.08.01.
북부처리장	‘12.12.31	‘13.12.31.
금마처리장	‘13.01.31	‘13.12.08.

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과	비고
6	• 결산서와 관련하여 ▸2012년도 결산서를 보면 손익계산서상 171억이 손실로 나옴 09BTL사업이 끝나면 노후시설 교체등으로 손실비용이 점차 증가될 것 같은데 이에 대한 대책은? ▸2012년도 결산서상 국고미수금을 자금없는 이월을 하면서 결산액과 통장상의 결산이 맞지않으며 또한 결산서를 작성하면서 통장잔액증명서를 첨부하지 않았는데 앞으로 정확한 결산과 통장잔액증명서등 확인할 수 있는 첨부서류를 첨부하여 작성하기 바람 ▸주요불용액 내역을 보면 북부하수처리장 주민숙원사업에서 445백만원예산에서 399백만원을 불용하였는데 그 이유와 예산을 편성해놓고 반납할거라면 예산자체를 편성하지 않아야 하는데 이에 대해서 각별히 유념하기 바람	▸하수도요금 현실화 등 세입 증대계획을 수립하여 당기순손실(수입<지출) 최소화 방안 모색하고 있음 ▸2013년도 결산시 결산제출서류가 누락되지 않도록 결산서 작성 및 첨부서류 제출하였음 ▸예산수립에 있어 정확한 예측수요에 의한 사업비를 책정하고 예산편성단계부터 사업의 필요성․타당성 등을 면밀히 검토하여 불용액 과다발생 등 재원이 사장되는 사례가 없도록 하고 있음.

4. 2013년도상급기관 감사시 지적사항 조치결과

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수행정담당		최 용 식	□
작성자	:	하수시설담당		이 정 노	□
작성자	:	하수운영담당		서 정 인	□
작성자	:	생활하수담당		박 양 환	□
작성자	:	하수관리담당		이 해 균	□

해  당  없  음

5. 시정질문에 대한 조치결과

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수행정담당		서 정 인	□

【관리번호 : 170 - 8 - 1 】

일 시	2013. 7. 22. (제170회 제1차 정례회)	질문의원	박 종 열	답 변	시장
제 목	하수슬러지 처리사업에 대하여			소관부서	상하수도사업단 (하수관리과)
처리결과	완 결 ( ○ ) 진 행 ( ) 처리불가 ( )
▣ 질 문 요 지 ◦ 하수슬러지 처리시설 설치사업 전면 재검토 의향 ▸현재 운영되고 있는 부송동 소각장에서 혼합소각방식 검토 ▸부송동 혼합 소각시 시설비 및 운영비등 막대한 예산절감 효과발생
▣ 답 변 내 용 ◦ 하수슬러지 처리시설 설치사업 검토결과 정상추진이 타당함 ▸혼합소각방식 검토 결과 하수슬러지 처리시설 신설이 타당함 ▸혼합소각시 시설비는 추가예산이 투입되어야 하며 예산절감 기대효과는 현재 추진하는 사업시행시 발생되는 절감액과 비슷함 ▣ 처 리 내 용 ◦ 하수슬러지 처리시설 설치사업 검토결과 제출 ▸혼합소각방식과 하수슬러지 처리시설 비교검토 ▸혼합소각방식과 하수슬러지 처리시설 사업비 및 운영비 비교검토 ▣ 금 후 계 획 ◦ 하수슬러지 처리시설 설치사업 정상추진

【관리번호 : 173 - 7 - 3 】

일 시	2013. 12. 19. (제173회 제2차 정례회)	질문의원	박 종 열	답 변	시장
제 목	하수슬러지 처리시설 운영지침 개정 관련			소관부서	상하수도사업단 (하수관리과)
처리결과	완 결 ( ○ ) 진 행 ( ) 처리불가 ( )
▣ 질 문 요 지 ◦ 하수슬러지 운영지침 개정 관련 ▸환경부에서 생활폐기물 처리시설이 있는 경우 혼소방안을 미리검토하여 예산낭비 요인이 발생하지 않도록 하수슬러지 처리시설 운영지침을 개정한다고 하는데 시장님 생각은?
▣ 답 변 내 용 ◦ 하수슬러지 운영지침 개정 관련 ▸우리시 하수슬러지 처리시설 설치사업은 감사원감사 결과 예산 낭비 요인이 없다고 확인 되었으며 ▸전문기관인 한국환경공단에 혼소방안을 검토의뢰 하여 전용소각시설을 설치하는 것이 타당하다고 검토된 사항으로 ▸〈하수슬러지 처리시설 운영지침〉이 개정된다고 해도 우리시는 해당이 없음 ▣ 처 리 내 용 ◦ 감사원감사결과수신 (2013.05.28.) ▸예산낭비에 대한 지적사항이 없어 사업 정상추진 통보 ◦ 생활폐기물 과 혼합소각 경재성 재검토 완료(2013.11.13.) ▸전용소각시설을 설치하는 것이 타당하다고 검토됨 ▣ 금 후 계 획 ◦ 하수슬러지 처리시설 설치사업 정상 추진 ▸하수슬러지 처리시설 운영지침이 개정이 된다 하여도 혼소방안 검토 결과에 따라 전용소각시설을 설치하는 것으로 정상추진

6. 주요사업조서(3천만원 이상)

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수시설담당		이 정 노	□
작성자	:	하수운영담당		서 정 인	□
작성자	:	하수관리담당		이 해 균	□

(단위 : 백만원)

사 업 명	공 사 개 요	공사기간	사업비	시공회사	공정율 (‘14.08월)
계	23건		24,893
황등원신기마을진입로확포장공사	진입로 확포장 L=668m	2012.09.06~ 2013.09.04	288	(합)군장종합건설	100
춘포처리구역하수관거 정비사업(1차분)	L=0.9km 배수설비34개소	2012.10.15~ 2013.07.16	298	(주)흥건	100
유천생태습지및생태 하천복원사업(1차분)	생태습지조성 토공 88,880㎥	2012.11.06～ 2013.09.06	507	(유)국일건설	100
함열처리구역(신은분구)하수관거정비사업(1차)	하수관거L=3.9km	2012.11.19 ～ 2013.11.20	1,245	세움종합건설 (주)	100
함열처리구역(북지분구)하수관거정비사업(1차)	하수관거L=2.1km	2012.11.26 ～ 2013.11.28	1,108	대왕건설(유)	100
함열처리구역(성당분구)하수관거정비사업(1차)	하수관거L=1.5km	2012.12.26 ～ 2013.10.28	212	(유)대창	100
익산처리구역(남부2) 하수관거정비사업(신동)	배수설비 69가구	2013.04.19 ～ 2014.04.02	177	㈜세종건설	100
춘포처리구역하수관거 정비사업(2차분)	하수관거L=5.5km	2013.05.31~ 2014.08.04	1,725	(주)흥건	100
유천생태습지및생태 하천복원사업(2차분)	생태습지조성 토공,목교및데크	2013.05.27 ～ 2014.07.21	4,436	(유)국일건설	100
사 업 명	공 사 개 요	공사기간	사업비	시공회사	공정율 (‘14.08월)
함열처리구역(북지분구)하수관거정비사업(2차)	하수관거L=0.6km	2013.05.28 ～ 2014.03.27	742	대왕건설(유)	100
함열처리구역(성당분구)하수관거정비사업(2차)	하수관거L=2.0km	2013.05.29 ～ 2014.03.24	899	(유)대창	100
익산공공하수처리장총인처리시설설치공사	총인처리시설 1식	2012.06.19~ 2013.08.01	5,685	(유)도영종합건설	100
익산공공하수처리장총인처리시설전기공사및계측제어	동력설비공사 1식 계측제어 1식	2012.06.19~ 2013.07.31	274	(유)거창 (유)우진이엔에스	100
익산금마하수처리장총인처리시설설치공사	총인처리시설 용량1,100㎥	2012.12.03 ～ 2013.12.08	518	(주)만훈	100
익산공공하수처리장 개량공사	산기장치 780EA	2012.11.29 ～ 2013.09.24	2,553	성우건설(주)	100
익산공공하수처리장개량공사 전기공사	전력간선 및 동력설비공사 1식	2012.11.28 ～ 2013.09.23	189	(주)양지전업사	100
익산북부하수처리장총인처리시설설치공사	총인처리시설 용량30,000㎥	2013.03.25 ～ 2013.12.31	2,774	우진건설(주)	100
익산북부하수처리장총인처리시설전기공사	동력설비공사1식	2013.02.05 ～ 2013.12.31	223	(유)금상전력	100
익산북부하수처리장총인처리시설정보통신공사	1식	2013.04.17 ～ 2013.12.31	132	(유)창원	100
금강분뇨처리장철거공사	건물철거20개동	2012.09.10~ 2013.11.05	681	(유)세건산업	100
2013년도 장마대비 하수도 기계준설공사	준설량 Q=600㎥	2013.06.13.~ 2013.10.22.	75	(유)광우건설	100
2013년도상반기시내일원하수도기계준설공사	준설량 Q=600㎥	2013.02.07.~ 2013.05.20.	77	(유)대길환경	100
2013년도 우기대비 하수도 기계준설공사	준설량 Q=600㎥	2013.04.23.~ 2013.08.27.	75	(유)지수건설	100

7. 2012년도 각종 민원(진정,건의,청원 등)접수 처리내역

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수행정담당		최 용 식	□
작성자	:	하수시설담당		이 정 노	□
작성자	:	하수운영담당		서 정 인	□
작성자	:	생활하수담당		박 양 환	□
작성자	:	하수관리담당		이 해 균	□

해  당  없  음

8. 기금 운용 관련

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수행정담당		최 용 식	□

해  당  없  음

9. 위원회(자문위원회 포함) 운영 관련

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수행정담당		최 용 식	□
작성자	:	하수시설담당		이 정 노	□
작성자	:	하수운영담당		서 정 인	□
작성자	:	생활하수담당		박 양 환	□
작성자	:	하수관리담당		이 해 균	□

해  당  없  음

10. 용역사업 관련

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수시설담당		이 정 노	□
작성자	:	하수운영담당		서 정 인	□
작성자	:	하수관리담당		이 해 균	□

□ 용역비 미집행 사업 추진현황 : 없음

□ 용역사업 추진현황

(단위 : 백만원)

용역의뢰건명	용역업체	용역비	용 역 계약방법	비 고
계	15건	2,041
황등원신기마을진입로확포장공사 폐기물처리용역	(유)다일환경산업	32	공개견적
황등원신기마을진입로확포장공사 지정폐기물처리용역	(주)류한환경	4	수의계약
유천생태습지및생태하천복원사업 폐기물처리용역	(유)다일환경산업	114	공개견적
춘포처리구역하수관거정비사업폐기물 처리용역(1차분)	일진도시환경(주)	18	공개견적
춘포처리구역하수관거정비사업폐기물 처리용역(2차분)	일진도시환경(주)	71	공개견적
함열처리구역(신은분구)하수관거정비 사업폐기물처리용역(1차분)	(유)그린환경건설	54	공개견적
함열처리구역(북지분구)하수관거정비 사업폐기물처리용역(1차분)	(유)숲으로	45	공개견적

용역의뢰건명	용역업체	용역비	용 역 계약방법	비 고
함열처리구역(성당분구)하수관거정비 사업폐기물처리용역(1차분)	(유)고려환경개발	23	공개견적
함열춘포처리구역하수관거정비 CCTV조사및수밀시험(1차분)	(주)영신건설	75	공개견적
익산처리구역(남부2)하수관거정비 (신동)폐기물처리용역	(유)해동환경	2	수의계약
천서·왕궁지구 하수관거정비공사 실시설계용역	(주)태영기술공사	79	공개견적
금강분뇨처리장철거공사건설폐기물처리용역	(유)그린환경건설	261	공개견적
금강분뇨처리장철거공사폐기물위탁처리(지정폐기물)용역	(유)진영환경	21	공개견적
익산시공공하수처리장(총인및질소처리시설)설치사업전면책임감리용역	(주)신우엔지니어링	720	공개견적
익산시 물재이용관리계획수립용역	㈜이 산	522	공개견적

□ 용역사업중 사전기술심사를 하여 참가자격 제한사례 : 없음

□ 각종 용역사업중 실제사업에 적용시키지 못하고 사장하고 있는 용역현황 : 없음

□ 각종 용역사업중 사업중단으로 용역을 적용시키지 못한 사례 : 없음

11. 각종 민간사회단체 보조금지원 관련

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수행정담당		최 용 식	□

해  당  없  음

12. 인․허가 민원관련

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	생활하수담당		박 양 환	□

□  각종 민원서류중 보완 요구 및 반려현황 : 해당없음

□  각종 민원서류중 법령기간 초과처리건수 : 해당없음

□  민원 처리업무의 감사실적 및 결과 : 해당없음

□  불허, 취하 민원 현황 및 내용과 사유 : 해당없음

13. 각종공사 설계변경 상황

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수시설담당		이 정 노	□
작성자	:	하수운영담당		서 정 인	□
작성자	:	하수관리담당		이 해 균	□

(단위 : 백만원)

날 짜	사 업 명	예산액	계 약 액			계약자	공사기간	변경사유
			당초	변경	증․감
	계	19건
2013. 8.22	황등원신기마을진입로 확포장공사	517	287	288	1	(합)군장종합건설	12.09.06 ~13.09.04	현장여건반영및보험료정산
2013. 7.5	춘포처리구역하수관거 정비사업(1차분)	690	586	298	-288	㈜흥건	12.10.15 ~13.07.16	현장여건반영및보험료정산
2013. 9.3	유천생태습지및생태 하천복원사업(1차분)	2,171	1,013	507	-506	(유)국일건설	12.11.06 ~13.09.06	전라북도특정감사결과반영
2013. 12.17	유천생태습지및생태 하천복원사업(2차분)	6,070	5,360	5,007	-353	(유)국일건설	13.05.27 ~14.07.21	현장여건반영 (주민의견수렴)
2013. 10.29	함열처리구역(신은분구) 하수관거정비사업(1차분)	1,573	1,245	1,245	-	세움종합 건설(주)	12.11.19 ~13.11.20	현장여건반영(구간조정)
2013. 10.18	함열처리구역(성당분구) 하수관거정비사업(1차분)	310	212	212	-	(유)대창	12.11.26 ~13.11.28	현장여건반영(구간조정)
2013. 1.28	분뇨처리장철거공사	689	564	689	125	(유)세건 산업	12.09.10 ~13.11.05	소화조음식물 찌꺼기처리
2013. 6.3	익산공공하수처리장 개량전기공사	203	164	203	39	(주)양지전업사	12.12.06 ~13.09.23	신규차단기 및현장여건반영
2013. 7. 5	익산공공하수처리장총인처리시설전기및계측제어공사	274	242	274	32	거창 및 우진이엔에스	12.06.19 ~13.07.31	현장여건반영 및기계설비변경
2013. 7.23	익산공공하수처리장 총인 처리시설설치사업	6,346	5,434	5,685	250	(유)도영종합건설	12.06.20 ~13.08.01	원수공급배관및역세펌프변경

날 짜	사 업 명	예산액	계 약 액			계약자	공사기간	변경사유
			당초	변경	증․감
2013. 9.11	익산북부공공하수처리장 총인처리시설전기공사	223	198	223	25	(유)금상전력	13.02.06 ~13.10.31	현장여건반영
2013. 9.12	익산공공하수처리장 개량공사	2,876	2,506	2,553	47	(주)성우건설	12.12.03 ~13.09.24	흡음판설치 및보험료정산
2013. 11.25	금마하수처리장 총인처리 시설설치공사	598	449	518	69	㈜만훈	13.01.08 ~13.12.08	악취민원 반응조덮개설치
2013. 12.02	북부하수처리장 총인처리설치사업	3,100	2,611	2,774	163	(주)우진건설	13.03.25 ~13.12.31	처리수유출 밸브형식변경
2013. 5.16	삼기면 상표마을외 3개소 하수도정비공사	11	10	11	1	(유)대명건설	2013.04.01 ~2013.05.28	현장여건반영및보험료정산
2013. 6.03	황등면 신기1마을외 3개소 하수도정비공사	16	16	16	-3	㈜삼학건설	2013.04.22 ~2013.06.03	현장여건반영및보험료정산
2013. 12.27	낭산면 덕영동마을외 3개소 하수도정비공사	18	17	18	1	(유)주신테크	2013.11.05 ~2013.12.30	현장여건반영및보험료정산
2013. 5.16	월성동 412-1번지외 4개소 하수도정비공사	10	9	10	1	남성환경	2013.03.18 ~2013.05.31	현장여건반영및보험료정산
2013. 6.14	용안면 농협앞 상습침수지역 우수관거확장공사	19	27	19	-8	(유)오상건설	2013.04.23 ~2013.06.24	현장여건반영및보험료정산

14. 건설공사 집행 현황(3천만원 이상)

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수시설담당		이 정 노	□
작성자	:	하수운영담당		서 정 인	□
작성자	:	하수관리담당		이 해 균	□

(단위 : 백만원)

사 업 명	공 사 개 요	공사기간	사업비	시공회사	공정율 (‘14.08월)
계	23건		24,893
황등원신기마을진입로확포장공사	진입로 확포장 L=668m	2012.09.06~ 2013.09.04	288	(합)군장종합건설	100
춘포처리구역하수관거 정비사업(1차분)	L=0.9km 배수설비34개소	2012.10.15~ 2013.07.16	298	(주)흥건	100
유천생태습지및생태 하천복원사업(1차분)	생태습지조성 토공 88,880㎥	2012.11.06 ～ 2013.09.06	507	(유)국일건설	100
함열처리구역(신은분구)하수관거정비사업(1차)	하수관거L=3.9km	2012.11.19 ～ 2013.11.20	1,245	세움종합건설 (주)	100
함열처리구역(북지분구)하수관거정비사업(1차)	하수관거L=2.1km	2012.11.26 ～ 2013.11.28	1,108	대왕건설(유)	100
함열처리구역(성당분구)하수관거정비사업(1차)	하수관거L=1.5km	2012.12.26 ～ 2013.10.28	212	(유)대창	100
익산처리구역(남부2) 하수관거정비사업(신동)	배수설비 69가구	2013.04.19 ～ 2014.04.02	177	㈜세종건설	100
춘포처리구역하수관거 정비사업(2차분)	하수관거L=5.5km	2013.05.31~ 2014.08.04	1,725	(주)흥건	100
유천생태습지및생태 하천복원사업(2차분)	생태습지조성 토공,목교및데크	2013.05.27 ～ 2014.07.21	4,436	(유)국일건설	100
사 업 명	공 사 개 요	공사기간	사업비	시공회사	공정율 (‘14.08월)
함열처리구역(북지분구)하수관거정비사업(2차)	하수관거L=0.6km	2013.05.28 ～ 2014.03.27	742	대왕건설(유)	100
함열처리구역(성당분구)하수관거정비사업(2차)	하수관거L=2.0km	2013.05.29 ～ 2014.03.24	899	(유)대창	100
익산공공하수처리장총인처리시설설치공사	총인처리시설 1식	2012.06.19~ 2013.08.01	5,685	(유)도영종합건설	100
익산공공하수처리장총인처리시설전기공사및계측제어	동력설비공사 1식 계측제어 1식	2012.06.19~ 2013.07.31	274	(유)거창 (유)우진이엔에스	100
익산금마하수처리장총인처리시설설치공사	총인처리시설 용량1,100㎥	2012.12.03 ～ 2013.12.08	518	(주)만훈	100
익산공공하수처리장 개량공사	산기장치 780EA	2012.11.29 ～ 2013.09.24	2,553	성우건설(주)	100
익산공공하수처리장개량공사 전기공사	전력간선 및 동력설비공사 1식	2012.11.28 ～ 2013.09.23	189	(주)양지전업사	100
익산북부하수처리장총인처리시설설치공사	총인처리시설 용량30,000㎥	2013.03.25 ～ 2013.12.31	2,774	우진건설(주)	100
익산북부하수처리장총인처리시설전기공사	동력설비공사1식	2013.02.05 ～ 2013.12.31	223	(유)금상전력	100
익산북부하수처리장총인처리시설정보통신공사	1식	2013.04.17 ～ 2013.12.31	132	(유)창원	100
금강분뇨처리장철거공사	건물철거20개동	2012.09.10~ 2013.11.05	681	(유)세건산업	100
2013년도 장마대비 하수도 기계준설공사	준설량 Q=600㎥	2013.06.13.~ 2013.10.22.	75	(유)광우건설	100
2013년도상반기시내일원하수도기계준설공사	준설량 Q=600㎥	2013.02.07.~ 2013.05.20.	77	(유)대길환경	100
2013년도 우기대비 하수도 기계준설공사	준설량 Q=600㎥	2013.04.23.~ 2013.08.27.	75	(유)지수건설	100

15. 중소기업진흥 및 제품구매촉진에 관한법률에 의한 물품구입현황(3천만원이상)

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수시설담당		이 정 노	□
작성자	:	하수운영담당		서 정 인	□
작성자	:	하수관리담당		이 해 균	□

해 당 없 음

16. 민간에 대한 보조금 집행 내역

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수시설담당		이 정 노	□

(단위 : 백만원)

보조사업자	사 업 명	사업개요	사업비	비 고
황등건덕정	건덕정리모델링 및기능보강	과녁터 기능보강	18
황등이화아파트 자치회	황등이화아파트 기능보강	건물외벽도색	6
황등번영회	황등번영회 기능보강	회의용책상 및엠프설치	8
우남아파트	황등우남아파트 기능보강	건물균열보수 및외벽도색	20
영창입주자 대표회의	황등영창아파트 기능보강	건물균열보수 및외벽도색	29
보삼경로당	황등보삼경로당 철거및환경정비	경로당철거 및환경정비	11

17. 국․도비 보조사업 집행현황(1억원 이상)

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수시설담당		이 정 노	□
작성자	:	하수운영담당		서 정 인	□

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업 개요	사업 기간	2013년 예산액					집행액	비고
			계	국비	도비	시비	민자
			31,637	20,918	781	8,931		29,330
'06하수관거 임대형민자사업(BTL)	하수관거 L=86.5km	08.04 ~11.05	7,389	4,649	199	2,541		7,389
춘포처리구역 하수관거정비사업	하수관거 L=10.4km	11.01 ~14.12	2,163	1,514	65	584		2,063
함열처리구역 하수관거정비사업	하수관거 L=22.5km	11.01 ~14.12	2,627	1,839		788		2,427
유천생태습지 및 생태하천복원사업	생태습지조성 141,121㎥ 생태하천L=1.3km	09.01 ~15.09	6,070	4,249		1,821		5,070
합류식하수도월류수 (CSOs)처리시설설치	저류시설 V=27,000㎥	10.12 ~14.12	10,761	7,533	323	2,905		10,761
익산북부하수처리장총인처리시설설치공사	총인처리시설 용량30,000㎥	12.1 ～13.12	2,627	1,134	194	292	0	1,620

18. 명시 및 사고이월사업비 집행내역

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수시설담당		이 정 노	□
작성자	:	하수운영담당		서 정 인	□
작성자	:	하수관리담당		이 해 균	□

(단위:백만원)

사 업 명	사업개요	공사기간	사업비	이월액	공정율 (‘14.8월)	비고
건	6건		1405
원신기진입로확포장공사	토지매입 36필지	2011.01 ～2013.09	17	-	85% (토지매입)	사고이월
원신기진입로확포장공사	진입로 확포장 L=668m	2012.09 ～2013.09	396	83	100%	명시이월
북부하수처리장 계문동주민숙원사업(민간보조)	경로당신축 모정신축 등	2011 ~2013	136	-	100%	사고이월
금강분뇨처리장철거공사	20개동 8,183㎡	2012.08.30 ~2013.11.05	574	574	100%	사고이월
금강분뇨처리장철거공사 건설폐기물처리용역	폐기물처리1식	2012.09.03 ~2013.11.05	261	261	100%	사고이월
금강분뇨처리장철거공사 건설폐기물(지정폐기물)처리용역	지정폐기물처리1식	2012.10.05 ~2013.05.11	21	21	100%	사고이월

19. 예산전용 사항 및 예비비 집행현황

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수행정담당		최 용 식	□

□ 예산전용 사항

해  당  없  음

□ 예비비 집행현황

해  당  없  음

20. 공사 준공기한 연장 내역

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수시설담당		이 정 노	□
작성자	:	하수운영담당		서 정 인	□
작성자	:	하수관리담당		이 해 균	□

해  당  없  음

21. 국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액  반납한 예산현황

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수시설담당		이 정 노	□
작성자	:	하수운영담당		서 정 인	□
작성자	:	하수관리담당		이 해 균	□

해  당  없  음

22. 국․도비 반납 현황(항목별 반납사유 명시)

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수행정담당		최 용 식	□
작성자	:	하수시설담당		이 정 노	□
작성자	:	하수운영담당		서 정 인	□
작성자	:	생활하수담당		박 양 환	□
작성자	:	하수관리담당		이 해 균	□

해  당  없  음

23. 2013년도 계획사업중 미착공사업 현황

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수시설담당		이 정 노	□
작성자	:	하수운영담당		서 정 인	□
작성자	:	하수관리담당		이 해 균	□

해  당  없  음

24. 2013년도 계획사업중 유보 및 취소된 사업현황

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수시설담당		이 정 노	□
작성자	:	하수운영담당		서 정 인	□
작성자	:	하수관리담당		이 해 균	□

해  당  없  음

25. 2013년도 이월사업중 유보 및 취소된 사업

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수시설담당		이 정 노	□
작성자	:	하수운영담당		서 정 인	□
작성자	:	하수관리담당		이 해 균	□

해  당  없  음

26. 2013년도 예산편성후 전액 미집행 내역

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수행정담당		최 용 식	□
작성자	:	하수시설담당		이 정 노	□
작성자	:	하수운영담당		서 정 인	□
작성자	:	생활하수담당		박 양 환	□
작성자	:	하수관리담당		이 해 균	□

해  당  없  음

27. 소송 사건 현황

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수관리담당		이 해 균	□

사건명	사건개요	당사자		최초제소		진행상황
		원고	피고	일자	관할법원
손해배상(기)청구의 소 (군산지원 2013가단54524)	모현동1가 608-12에 하수관거 이설 지연으로 생긴 손해를 배상	강현태	익산시	2013. 11. 29.	전주지방법원 군산지원	14. 7. 17.원고일부승소 (14.7.31. 원고항소)
토지인도 등 청구 (군산지원 2013가단18286)	모현동1가 625-1의 토지를 인도 및 상수도관, 하수도관 이설	홍연례	익산시외 1	2012. 11. 14.	전주지방법원 군산지원	(2014. 1. 24. 판결) - 판결내용 :모현동1가 625-1의 토지를 인도하고 상수도관 및 하수도관 철거할 것 - 추경에 예산 확보하여 하수도 이설 필요

28. 시 홈페이지에서 접수된 민원처리 현황

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수시설담당		이 정 노	□
작성자	:	하수관리담당		이 해 균	□

건 명	내 용	진정인	조치사항	처 리 결 과
맨홀파손 보수요청(2013.06.03)	석탄동 930-3번지 골목길 맨홀 파손 복구 요청	이현*	완료	2013.06.07. 현지확인후 보수완료
맨홀단차 보수요청(2013.10.01)	익산시 영등동 773-12 앞 맨홀단차로 인해 진동 및 소음발행하므로 보수요청	이희*	완료	2013.10.04 현지확인후 보수완료
빗물받이 보수요청(2013.02.06)	부송동 242-15번지 가게앞 빗물받이가 침하	오삼*	완료	2013.02.12. 현지확인후 보수완료
맨홀부분도로침하 (2013.10.15.)	오산면 장신리 840-5번지 맨홀부근 도로침하로 인한 사고위험으로 보수요청	유반*	완료	2013.10.22. 현지확인후 보수 완료
맨홀단차보수요청 (2013.05.23.)	부송하나리움 앞 맨홀단차로 인해 진동 및 소음발행하므로 보수요청	현재*	완료	2013.05.24.현지확인 후 보수 완료
도로배수보수요청 (2013.08.26.)	하나로도로 함열에서 익산방향 주유소 인근 도로 침수 보수요청 및 사고처리 보상요청	소효*	완료	2013.09.05. 현지확인 후 배수조치 완료 및 사고에 대한 시 자체적 보상은 어려운 실정 통보
오수관로 BTL 공사구간 포장요청 (13.02.15)	오수관로 작업 후 진입로 미 포장에 따른 주민통행 불편 및 사고발생 위험이 있음	김대*	완료	민원발생구간 노면정리 실시 후 2013.3.포장 완료
하수도공사에따른 통행불편초래 (13.06.02)	송학동 변전소 방향 하수도 공사에 따른 통행불편	유경*	완료	민원발생구간 2013.6.3. 임시포장 완료 후 2013.7 본포장 완료
하수관거공사 주변도로 포장요망 (13.08.22)	노동부익산고용안전센터 일원 도로폐임현상에 따른 요철구간 보수 요청	진국*	완료	민원발생구간 통행불편 이해당부 후 2013.9.15.포장완료
하수관거공사 주변도로 포장요망 (13.11.27)	송학동 화이트 보석사우나 일원 미 포장에 따른 통행 불편	이경*	완료	민원발생구간 통행불편 이해 당부후 2013.12.포장완료

29. 각종 보조금 지급내역(지급대상자 명단첨부)

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수시설담당		이 정 노	□

(단위 : 백만원)

보조사업자	사 업 명	사업개요	사업비	비 고
황등건덕정	건덕정리모델링 및기능보강	과녁터 기능보강	18
황등이화아파트 자치회	황등이화아파트 기능보강	건물외벽도색	6
황등번영회	황등번영회 기능보강	회의용책상 및엠프설치	8
우남아파트	황등우남아파트 기능보강	건물균열보수 및외벽도색	20
영창입주자 대표회의	황등영창아파트 기능보강	건물균열보수 및외벽도색	29
보삼경로당	황등보삼경로당 철거및환경정비	경로당철거 및환경정비	11

감사자료 과 요구사항

1. 하수도사업 공기업 운영 사항

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수행정담당		최 용 식	□

□ 현      황

◦ 자     산  :  397,286백만원

▸ 자    본  -  324,341백만원

▸ 부    채  -   72,945백만원(부채비율 18.4%)

◦ 하수도사용료 부과․징수

(단위 : 백만원)

사용료수익 예 산 액	부 과 액	징 수 액	체 납 액	비 고
9,222	10,458	10,349	109

◦ 하수관거정비 BTL사업 연도별 부채 상환계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	임대료	상환액	상 환 계 획
			계	2014	2015	2016	2017이후
계	222,715
06하수관거정비 BTL민간 투자사업	107,367	15,886	91,481	6,017	6,017	5,368	74,079
09하수관거정비 BTL민간 투자사업	115,348	-	115,348	2,403	5,767	5,767	101,411

◦ 연도별 하수도사용료 현실화 계획

(단위 : ％)

2013년 결산	연 도 별			비 고
	2015	2016	2017
23.7	32.9	42.0	51.1	정부정책상제시된 하수도현실화율 감안 51.1% 목표제시

※현실화율 : (사용요금/처리원가)×100

⃞ 추 진 실 적

◦ 사용료 체납액 강력 징수

(단위 : 백만원)

구 분	부과액	징수액	체납액	비고
계	10,634	10,443	190
2013년	10,458	10,348	109
과년도	176	95	81

▸지역별 담당직원 책임관리 ………………………………………… 2개조 4명

▸전체 체납자 납부 독촉안내문 발송 …………………… 3,250건 176백만원

※ 위탁징수분은 상수도사용료와 같이 납부독촉을 하고 있음

◦하수도 사용료의 정확한 검침 및 부과로 세입 증대 도모

▸지하수 계측 시간계 설치 및 노후계측기 교체 등

◦ 원인자부담금 징수 …………………………………………  66건 1,555백만원

◦ 여유자금 효율적 관리  …………………………………………	20,533백만원

계	양 도 성 예금증서	기업예금	정기예금	보통예금	비 고
20,533		2,000	17,000	1,533

2. 하수도요금 부과징수 및 체납액 현황

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수행정담당		최 용 식	□

□ 부과징수 현항

(13.12.31 기준, 단위 : 백만원)

구 분	부과액	징수액	체납액	징수율(%)
계	10,458	10,349	109	99.0
상수도	9,610	9,518	92	99.0
지하수	848	831	17	99.0

□ 하수도사용료 연도별 체납액 현황

(단위:백만원)

년 도 금 액	2009이전	2010	2011	2012	2013
214	72	7	17	9	109

□ 하수도사용료 체납액 현황(상위 20위)

(단위:천원)

연번	수용가명	수용가 번호	주소	체납액	체납연도	비고
계	20건			107,305
1	이희덕	131-0015	함열읍 643-17(백제산소황토방)	21,500	2004~2013	지하수사용자
2	한제임스본드	170-3167	무왕로6길39(영등동해송사우나)	18,985	2007~2008	상수도사용자
3	이영택	165-4320	고현로 7길 10 (모현1가)	9,808	2004~2005	상수도사용자
4	㈜보광염공	175-0196	석암로15길26 (팔봉동)	8,251	2005	상수도사용자
5	(주)그랜드 관광호텔	156-0863	평화동 329-2	7,872	2006~2012	상수도사용자
6	이천인	176-0032	부송동 700-13	6,234	2012	지하수사용자
7	송철	170-0002	영등동 548-17	4,361	2008~2012	지하수사용자
8	우남관리사무소	165-3878	모현동 99-4(우남아파트)	3,575	2001~2006	상수도사용자
9	한제임스본드	160-0631	인화2가 (스파리스)	3,206	2007~2008	상수도사용자
10	(주)그랜드 관광호텔	156-0863	평화동 329-2	3048	2006~2012	상수도사용자
	한제임스본드	160-0631	인화2가 (스파리스)	2,962	2007~2008	상수도사용자
11	길기은	170-3106	영등동824-5	2,798	2005	상수도사용자
12	정현숙	165-4052	모현동1가 504-1	2,616	2003	상수도사용자
13	김주인	175-0030	팔봉동 891(주.삼연)	2,309	2011	지하수사용자
14	최미경	153-0027	중앙1가13(중앙찜질방사우나)	1,969	2011~2012	지하수사용자
15	강대영	133-0004	황등3길7 (영창목욕탕)	1,818	2009~2013	지하수사용자
16	김문철	170-3467	영등동 303-7	1,756	2012	상수도사용자
17	권황옥	164-0034	익산대로 306 호수찬	1,390	2008~2013	지하수사용자
18	금호주택	131-0990	와리3길 (함열 금호주택)	1,347	1996~2007	상수도사용자
19	정창균	160-0306	인화2가97-3 (디바)	1,321	2012	상수도사용자
20	상승전자	160-1011	인화동1가 177-12	1,79	2012	상수도사용자

3. 하수도사업 채무 및 상환계획(상환조건, 기간 등)

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수시설담당		이 정 노	□

□ 채 무 현 황

(단위: 백만원)

구 분	총차입액	상 환 액 (누계)	미 상 환 액
계	222,715	15,886	206,829
06하수관거정비 BTL민간투자사업	107,367	15,886	91,481
09하수관거정비 BTL민간투자사업	115,348	0	115,348

□ 지방채 상환조건

재 원 별	용 도	상환조건	이율 (년)	상환기간	채권기관
06 BTL 리스	하수관거사업 BTL시설임대료	20년상환	변동 금리	2011 ~2031	(주)푸른익산환경
09 BTL 리스	하수관거사업 BTL시설임대료	20년상환	변동 금리	2014 ~2034	(주)청정익산

4. ‘09하수관거 임대형 민자사업(BTL) 추진현황

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하 수 시 설 담 당		이 정 노	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 남중, 중앙, 평화, 송학, 인화, 창인, 송학, 모현, 신동 일원

◦ 사 업 량 : 관거정비  L= 92km,  배수설비 6,643가구

◦ 사 업 비 : 69,536백만원(민자)

◦ 사업기간 : 2011. 02 ～ 2014. 08(4년)

◦ 사업시행자 : (주)청정익산, (주)포스코건설

□ 추 진 사 항

◦ 하수관거 BTL 민간투자사업 선정(환경부)	2008. 10

◦ 하수관거정비(BTL) 민간투자사업 위․수탁협약(환경관리공단)	2009.  4

◦ 실시협약 체결 및 사업시행자 지정	2010.  9

◦ 실   시   계   획   승   인	2011.  1

◦ 공 사 착 수	2011.  4

◦ 하수관거정비사업 추진 (총공정 100%)	2014.  8

▸ 하수관거 신설 및 교체 - 오수관로 L=87km, 우수관거 5km

▸ 배수설비(가정관로) 설치 6,300가구

◦ 공사시행 완료	2014.  8

5. 함열·춘포 처리구역 하수관거 정비사업

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하 수 시 설 담 당		이 정 노	□

□ 사 업 개 요

구 분	위 치	사 업 량	사업비(백만원)			사업기간	비고
			계	국비	시비
함열처리 구 역	계	관거정비L=22.5km 배수설비 591가구	16,446	11,512	4,934	11.01~15.12
	용안면 (신은)	관거정비L=9.9km 배수설비 241가구	7,368	5,157	2,211
	낭산면 (북지)	관거정비L=6.9km 배수설비 198가구	5,855	4,099	1,756
	성당면 (성당)	관거정비L=5.7km 배수설비 152가구	3,223	2,256	967
춘포처리 구 역	춘포면 석탄동	관거정비L=10.4km 배수설비 427가구	8,043	5,630	2,413	11.01~15.12

□ 추 진 사 항

◦ 환경청 재원협의 완료	2012.  4

◦ 전라북도 원가심사 완료	2012.  5

◦ 실시설계용역 완료	2012. 10

◦ 환경부 총사업비 변경 승인	2012. 11

◦ 공 사 착 수	2012. 11

◦ 하수관거정비사업 추진 (총공정 50%)………………………………  2014.  8

▸ 하수관거 신설 및 교체 - 오수관로 L=17km(함열 12km, 춘포6km)

▸ 배수설비(가정관로) 설치 30가구

6. 합류식 하수도 월류수(CSOs)처리시설 설치사업

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수시설담당		이 정 노	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 평화동 남양공업사뒤,  동산동(생태습지내)

◦ 사 업 량 : 저류시설 V=27,000㎥, 저류이송 관로 L=1.1km

◦ 사 업 비 : 30,493백만원(국비21,345, 도비914, 시비7,214, 기금1,020)

◦ 사업시행자 : 고려개발(한국환경공단 위탁)

◦ 사업기간 : 2010년 ～ 2014년(5년)

□ 추 진 사 항

◦ 사 업 추 진 협 약 체 결	2009.  8

▸ 환경부, 전라북도, 익산시, 한국환경공단, 전주시, 김제시, 완주군

◦ 종합계획수립 및 타당성조사 용역 완료	2010.  2

◦ 환경부 재원협의 및 총사업비 변경 승인	2010. 12

◦ 공  사  착  공	2010. 12

◦ 환경부 총사업비 변경 승인	2013.  3

◦ 공사추진 (총공정 93%)	2014.  8

▸ 남부2 처리시설(평화동) 저류조 내부시공 완료 및 부대공사

▸ 남부3 처리시설(동산동) 저류조 내부시공 완료 및 부대공사

7. 유천 생태습지 및 생태하천 복원사업

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수시설담당		이 정 노	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 금강동 993-1번지 일원

◦ 사업규모 : 생태하천복원 1.3㎞ / 생태습지조성 141,121㎡

◦ 사 업 비 : 28,550백만원(국비 14,061  시비 14,489)

◦ 사업기간 : 2009. 01 ～ 2015. 09(7년)

□ 추 진 사 항

◦ 타 당 성 조 사 및 투 융 자 심 사	2008.  9

◦ 기  본  계  획  용  역  완  료	2009.  7

◦ 도시관리계획(도시계획시설) 결정고시	2010.  7

◦ 환경부 재원협의 및 기술 검토	2012.  2

◦ 생태습지 및 생태하천 보상 완료	2012.  5

◦ 공사착수	2012. 11

◦ 동산동 발전위원회 간담회 및 주민설명회 개최(총5회)

2012. 11 ~ 2013. 2

◦ 순천만 정원박람회 선진지 견학(시의회, 집행부, 주민)	2013.  4

◦ 환경부 총사업비 조정	2014.  4

◦ 공사추진 (총공정 50%)	2014.  8

▸ 토공, 배수공, 교량공 완료

8. 공공하수처리장 총인 및 질소처리시설 설치사업

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수운영담당		서 정 인	□

□ 사 업 개 요

사 업 명	위 치	사 업 량	사업비 (백만원)	사업기간	비고 (공정율)
익산하수처리장총인처리시설 설 치 사 업	금강동 1091-4	100,000㎥/일	6,346 (국3,173,도1,269 시1,903)	2011.1~2013. 8	MSF여과방식 (응집+여과방식)
북부하수처리장총인처리시설설치사업	황등면 신기리118-16	30,000㎥/일	3,100 (국2,170,도372, 시558)	2012.1~2013.12	Eco-JET-GREENPLUS방식 (가압부상+슬러지회수)
금마하수처리장총인처리시설설치사업	금마면 동고도리 1151-1	1,100㎥/일	598 (국418,도72, 시107)	2012.1~2013.12	Eco-JET-GREENPLUS방식 (가압부상+슬러지회수)
익산공공하수처리장개량사업	금강동 1091-4	반응조 산기관 설치-4개소	2,876 (국1,438,도719, 시719)	2012.1~2013. 9	미세기포산기장치+가압송풍방식

□ 추 진 사 항

◦익산공공하수처리장 총인처리 시설 설치사업

▸공사착공 : 2012.06.20  , 공사준공 : 2013.08.01

◦북부하수처리장 총인처리시설 설치사업

▸공사착공 : 2012.12.03  , 공사준공 : 2013.12.31

◦금마하수처리장 총인처리시설 설치사업

▸공사착공 : 2012.12.03  , 공사준공 : 2013.12.08

◦익산공공하수처리장 개량사업

▸공사착공 : 2012.12.03  , 공사준공 : 2013.09.24

9. 하수슬러지 자원화시설 설치사업

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수운영담당		서 정 인	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 금강동 1091-10(익산하수처리장 일원)

◦ 사 업 량 : 시설용량 100㎥/일

[ 건조 (100㎥/일) + 에너지회수 소각(50㎥/일미만)방식 〕

◦ 사 업 비 : 19,800백만원【국비(70%) 13,860  시비(30%) 5,940】

◦ 사업기간 : 2013. 5 ~ 2015. 5

◦ 책임운영(2년간 , 시공사) : 2015. 5 ~ 2017. 5

□ 추 진 사 항

◦ 업무 위․수탁 협약체결(한국환경공단)	2006. 2. 9

◦ 타당성조사 및 기본계획 용역 시행	2006. 8. 03~2007. 10. 2

◦ 대형공사 입찰방법 심의(전북도 지방건설기술심의위원회)	2011. 4. 15

◦ 기본계획 및 입찰안내서 준공	2012. 12. 31

◦ 하수슬러지 처리시설 설치사업 입찰공고	2013. 1. 8

◦ 주민간담회실시(동산동 주민센터)	2013. 2. 7

▸동산동 지역의원 및 주민 약75명정도 참석

◦ 시설공사 실시설계 적격자 결정(한국환경공단)	2013. 6. 4

▸코오롱환경서비스(주)컨소시엄

◦ 하수슬러지 주민협의체 간담회실시(총5회)	2013. 11. 13

◦ 실시설계 적격심의 및 VE완료(한국환경공단)	2013. 12. 10

◦ 하수슬러지 처리시설 설치사업 공사착공 (총공정 20%)	2013. 12. 31

10. 금강분뇨처리장 철거사업

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수운영담당		서 정 인	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 금강동 324번지 일원

◦ 사 업 량 : 부지면적 8,183㎡/20개동철거(철근콘크리트 4,179.94㎡,판넬767.54㎡)

◦ 사 업 비 : 681,190천원

◦ 사업기간 : 2012. 9. 10 ~ 2013. 11. 05

□ 추 진 사 항

◦ 실시설계용역발주	2012. 02. 28

◦ 실시설계용역착수	2012. 03. 12

◦ 설계심의요청	2012. 05. 24

◦ 실시설계 용역준공	2012. 06. 01

◦ 설계심의완료	2012. 06. 15

◦ 2012년 제9차 시정조정위원회 개최	2012. 07. 26

◦ 2012년 제9차 시정조정위원회 개최 결과	2012. 07. 31

◦ 공 사 착 공	2012. 09. 10

◦ 지정폐기물(석면)처리에 따른 행정절차(노동부) 이행 및 처리	2012. 10. 15

◦ 공 사 준 공	2013. 11. 05

11. 하수처리시설 운영관리

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수운영담당		서 정 인	□

□ 시설운영현황

◦ 시 설 현 황

구분	계	시설용량(㎥/일)				비고
		500이상	100～500미만	50～100미만	50미만
시설수	27	5	5	8	9

▸ 자체운영현황

시설명	용량 (㎥/일)	개소	처리공법	비고
여 산	600	1	ACS공법
소규모공공하수처리시설	1,671	21	A2O 등 14개 공법

▸ 민간위탁현황

시설명	용량 (㎥/일)	처리공법	위탁기간	위탁운영사	비고
익산	100,000	MLE+응집침전	'08.6.25～‘28.6.24	(주)전북엔비텍
익산북부	30,000	KIDEA	“	“
함열	6,000	SBR	“	“
금마	1,100	KIDEA	“	“
금강분뇨	150	전처리 후 하수연계처리	“	“

※ 위탁운영사 현황

상 호	설립일	자본금	운영 인원	사업방식	운영시설
(주)전북 엔비텍	2004.9.1	23,530백만원	29명	민간투자방식(BTO)	6개시군 29개소 (우리시 5개소)

□ 추 진 실 적

◦ 민간위탁 운영사 관리

▸ 선진화된 수계발, 지역별 통합관리를 통한 체계적 수질 관리

▸ 개별 처리장 및 권역센터 운영테이터를 전송받아 주야간 통합감시제어

▸ 위탁운영 하수처리장 수질검사 실시(유입수 및 방류수 BOD 등 6개 항목)

⇒ 매월 시료 채취 전라북도 보건환경연구원 수질분석 관리 : 12회

▸ 해빙기 대비 시설물 일제점검 및 상반기 시설물 하자점검(합동)

▸ 하수처리장 수질 TMS 설비 점검검사 실시

◦ 자체운영 하수처리장 순회 및 수시 점검실시

▸ 하수처리장 수질검사(익산하수처리장 실험실 분석의뢰․측정)

▸ 점검  횟수 : 순회(시설별 주 1～2회),  수시(고장발생 및 우기시)

▸ 시설개보수 : 기계 및 전기시설 17개소 60,000천원

◦ 하수처리장 유량조정조 및 슬러지저류조 등 오니청소 : 867톤

▸ 여산 : 2회 84톤,  오산지구 외 20개소 : 4회 783톤

◦ 소규모 하수처리장 및 주변 환경정비(잡초제거 등) : 21개소

12. 하수도사업관련 각종 용역 추진사항

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수시설담당		이 정 노	□
작성자	:	하수운영담당		서 정 인	□
작성자	:	하수관리담당		이 해 균	□

□ 사업개요 및 추진사항

용역의뢰건명	용역업체	용역비	용 역 계약방법	비 고
계	15건	2,041
황등원신기마을진입로확포장공사 폐기물처리용역	(유)다일환경산업	32	공개견적	폐기물 처리용역
황등원신기마을진입로확포장공사 지정폐기물처리용역	(주)류한환경	4	수의계약	폐기물 처리용역
유천생태습지및생태하천복원사업 폐기물처리용역	(유)다일환경산업	114	공개견적	폐기물 처리용역
춘포처리구역하수관거정비사업폐기물 처리용역(1차분)	일진도시환경(주)	18	공개견적	폐기물 처리용역
춘포처리구역하수관거정비사업폐기물 처리용역(2차분)	일진도시환경(주)	71	공개견적	폐기물 처리용역
함열처리구역(신은분구)하수관거정비 사업폐기물처리용역(1차분)	(유)그린환경건설	54	공개견적	폐기물 처리용역
함열처리구역(북지분구)하수관거정비 사업폐기물처리용역(1차분)	(유)숲으로	45	공개견적	폐기물 처리용역

용역의뢰건명	용역업체	용역비	용 역 계약방법	비 고
함열처리구역(성당분구)하수관거정비 사업폐기물처리용역(1차분)	(유)고려환경개발	23	공개견적	폐기물 처리용역
함열춘포처리구역하수관거정비 CCTV조사및수밀시험(1차분)	(주)영신건설	75	공개견적	CCTV용역
익산처리구역(남부2)하수관거정비 (신동)폐기물처리용역	(유)해동환경	2	수의계약	폐기물 처리용역
천서·왕궁지구 하수관거정비공사 실시설계용역	(주)태영기술공사	79	공개견적	실시설계
금강분뇨처리장철거공사건설폐기물처리용역	(유)그린환경건설	261	공개견적	폐기물 처리용역
금강분뇨처리장철거공사폐기물위탁처리(지정폐기물)용역	(유)진영환경	21	공개견적	폐기물 처리용역
익산시공공하수처리장(총인및질소처리시설)설치사업전면책임감리용역	(주)신우엔지니어링	720	공개견적	감리용역
익산시 물재이용관리계획수립용역	㈜이 산	522	공개견적	용역

13. 읍․면․동 하수도시설공사 추진현황

확인자	:	하수관리과장		김 성 도	□
작성자	:	하수관리담당		이 해 균	□

□ 사업개요 및 추진사항

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	사업개요	사업기간	총공사비 (백만원)	도급자	공정율 (‘13.12월)
	소 계(공사)	38건(6,371m)		978
1	신동 서영마을외 3개소 하수도정비공사	하수도정비 L=263m	2013.03.13.~ 2013.05.22	45	(유)푸른 엔지니어링	100
2	삼기면 상표마을 외3개소 하수도정비공사	하수도정비 L=236m	2013.04.01.~ 2013.05.28	22	(유)대명건설	100
3	낭산면 상낭마을외 3개소 하수도정비공사	하수도정비 L=217m	2013.03.29.~ 2013.05.31	25	금호토건(주)	100
4	은기동 하수도정비공사	하수도설치 L=119m	2013.04.19.~ 2013.05.31.	14	㈜신토성건설	100
5	여산면 학동마을외 1개소 하수도정비공사	하수도설치 L=128m	2013.09.24.~ 2013.11.11.	17	(유)신안건설	100
6	오산면 전동마을 하수도정비공사	하수도설치 L=78m	2013.04.25.~ 2013.05.31.	15	(유)도암건설	100
7	황등면 죽촌마을외 7개소 하수도정비공사	하수도설치 L=269m	2013.04.23.~ 2013.06.25.	33	(유)로진건설	100
8	황등면 신기1마을외 3개소 하수도정비공사	하수도설치 L=283m	2013.04.22.~ 2013.06.03.	27	㈜삼학건설	100
9	망성면 신리마을외 5개소 하수도정비공사	하수도설치 L=351m	2013.05.08.~ 2013.06.26.	44	㈜가나안	100
10	오산면 가장마을외 3개소 하수도정비공사	하수도설치 L=175m	2013.10.28.~ 2013.12.09.	18	㈜신토성건설	100
11	낭산면 죽신마을 하수도정비공사	하수도설치 L=107m	2013.05.27.~ 2013.12.24.	16	(유)태강건설	100

연번	사 업 명	사업개요	사업기간	총공사비 (백만원)	도급자	공정율 (‘13.12월)
12	황등면 구자마을외 2개소 하수도정비공사	하수도설치 L=150m	2013.10.31.~ 2013.12.26.	15	(유)광우건설	100
13	모현동 철도아파트앞 외 2개소 하수도정비공사	하수도설치 L=179m	2013.11.11.~ 2013.12.12.	27	㈜호남산업개발	100
14	낭산면 덕영동마을외 3개소 하수도정비공사	하수도설치 L=152m	2013.11.05.~ 2013.12.30.	26	(유)주신테크	100
15	석왕동 상왕길 하수도정비공사	하수도설치 L=162m	2013.11.22.~ 2013.12.30.	53	(유)한양기업사	100
16	팔봉동 길자동차학원앞 하수도설치공사	하수도설치 L=195m	2013.09.25.~ 2013.12.02.	32	남성환경	100
17	하수도시설물긴급민원처리공사 단가계약	익산시 일원 긴급 민원건	2013.02.05.~ 2013.07.04.	30	(유)도암건설	100
18	우기철 하수도시설물 긴급민원처리공사단가계약	익산시 일원 긴급 민원건	2013.07.17.~ 2013.12.16.	49	(유)금마건설	100
19	춘포면 대장교회 옆 우수박스 보수공사	우수박스 정비 1식	2013.01.28.~ 2013.02.06.	3	(유)범룡건설	100
20	춘포면 춘포리 37-28번지 외 3개소 하수도설치공사	하수도정비 L=204m	2013.04.01.~ 2013.05.20.	40	(합자)대진	100
21	중앙동 창인아파트 앞 하수도설치공사	하수도정비 L=86m	2013.03.26.~ 2013.04.05.	9	유한회사 엠제이이엔씨	100
22	용안면 중신정미소 앞 하수도설치공사	하수도정비 L=63m	2013.05.27.~ 2013.07.01.	14	㈜가나안	100
23	용안면 송정마을외 5개소 하수도설치공사	하수도정비 L=294m	2013.03.26.~ 2013.05.27.	26	(유)장성건설	100
24	왕궁면 신탄마을외 3개소 하수도설치공사	하수도정비 L=133m	2013.04.18.~ 2013.05.27.	41	(유)대명건설	100
25	함열읍 정동1길15-16외 4개소 하수도설치공사	하수도정비 L=181m	2013.02.21.~ 2013.04.09.	33	거원건설(주)	100
26	어양동홍가네가마솥앞 긴급하수도보수공사	하수관거 정비 1식	2013.02.07.~ 2013.02.20	7	유한회사 엠제이이엔씨	100
27	용안면 연동마을외 4개소 하수도설치공사	하수도정비 L=235m	2013.03.29.~ 2013.05.29.	20	㈜가나안	100
28	함열읍 용지리 411외 1개소 하수관거정비공사	하수도정비 L=168m	2013.05.31.~ 2013.07.17.	28	㈜건지토건	100

연번	사 업 명	사업개요	사업기간	총공사비 (백만원)	도급자	공정율 (‘12.12월)
29	금마면 용순리 신정마을외 3개소 하수도설치공사	하수도정비 L=380m	2013.03.11.~ 2013.04.05.	34	(유)우승건설	100
30	성당면 내난리 41외 3개소 하수도설치공사	하수도정비 L=207m	2013.02.15.~ 2013.04.03.	19	(유)보광건설	100
31	월성동 412-1번지외 4개소 하수도설치공사	하수도정비 L=188m	2013.03.18.~ 2013.05.31.	23	남성환경	100
32	왕궁면 궁평마을외 3개소 하수도설치공사	하수도정비 L=382m	2013.03.29.~ 2013.06.27.	37	(유)팔덕건설	100
33	용동면 두무마을 하수관거 정비공사	하수도정비 L=72m	2013.09.10.~ 2013.10.25.	16	(유)남성건설	100
34	용안면 농협앞 상습침수지역 우수관거확장공사	하수도정비 L=110m	2013.04.23.~ 2013.06.24.	30	(유)오상건설	100
35	동산동 작은옛뚜기마을외 1개소 하수관거정비공사	하수도정비 L=95m	2013.09.09.~ 2013.10.23.	20	금호토건 주식회사	100
36	정족동 산정마을외 7개소 하수관거정비공사	하수도정비 L=292m	2013.11.11.~ 2013.12.06.	40	(유)미래건설	100
37	왕궁면 상발마을외 2개소 하수도정비공사	하수도정비 L=207m	2013.12.20.~ 2014.04.18.	27	(유)태정건설	100
38	춘포면 역전마을 하수도정비공사	하수도정비 L=10m	2013.12.31.~ 2014.03.25.	3	(유)아태건설	100
	소 계(공사)	5건(1,942㎥)		311
39	2013동절기대비 하수도 기계준설공사	준설량 Q=72㎥	2013.12.13.~ 2014.01.23.	13	(유)광우건설	100
40	시내일원 하수도 기계준설공사	준설량 Q=70㎥	2013.11.05.~ 2013.12.10.	13	(유)한양기업사	100
41	2013년도 장마대비 하수도 기계준설공사	준설량 Q=600㎥	2013.06.13.~ 2013.10.22.	96	(유)광우건설	100
42	2013년도상반기시내일원하수도기계준설공사	준설량 Q=600㎥	2013.02.07.~ 2013.05.20.	95	(유)대길환경	100
43	2013년도 우기대비 하수도 기계준설공사	준설량 Q=600㎥	2013.04.23.~ 2013.08.27.	94	(유)지수건설	100