2014.  9.

제179회 익산시의회(제1차 정례회)

2014행정사무감사자료

www.iksan.go.kr

건설교통국

순  서

□	도시개발과	………	3
□	건설과	………	61
□	주택과	………	107
□	교통행정과	………	227
□	도로관리과	………	281
□	차량등록사업소	………	339

건   설   과

	□		감사자료 과 공통사항
			1.	2013 업무성과 및 반성 …………………………	5
			2.	2013 예산집행 및 추진사항 ……………………	6
			3.	2013년도 행정사무감사시 지적사항에 대한 조치 결과 …	8
			4.	2013년도 상급기관 감사시 지적사항 및 조치 결과 …	11
			5.	시정질문에 대한 조치 결과 ……………………	12
			6.	주요사업 조서(3천만원 이상) …………………	16
			7.	2013년도 각종 민원(진정․건의․청원 등) 접수 처리내역 …	16
			8.	기금 운용 관련 ………………………………	17
			9.	위원회(자문위원회 포함) 운영 관련 ……………	17
			10.	용역사업 관련 ……………………………………	18
			11.	각종 민간사회단체 보조금지원 관련 …………	18
			12.	인․허가 민원관련 ………………………………	19
			13.	각종공사 설계 변경상황 ………………………	20
			14.	건설공사 집행 현황(3천만원이상) ……………	21
			15.	중소기업진흥 및 제품 구매 촉진에 관한 법률에 의한 물품구입현황 (3천만원이상) ………………………	23
			16.	민간에 대한 보조금 집행 내역 ………………	23
			17.	국․도비 보조사업 집행현황(1억원이상) ………	24
			18.	명시 및 사고이월사업비 집행 내역 …………	25
			19.	예산전용 사항 및 예비비 집행 현황 …………	26
			20.	공사 준공기한 연장 내역 ………………………	26
			21.	국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황 …	27
			22.	국․도비 반납 현황 ……………………………	27
			23.	2013년도 계획사업중 미착공사업 현황 ………	28
			24.	2013년도 계획사업중 유보 및 취소된 사업현황 ……	28
			25.	2013년도 이월사업중 유보 및 취소된 사업 ………	29
			26.	2013년도 예산편성후 전액 미집행 내역 ………	29
			27.	소송 사건 현황 …………………………………	30
			28.	시홈페이지에서 접수된 민원처리 현황 ………	31
			29.	각종 보조금 지급 내역 …………………………	32

	□		감사자료 과 요구사항
				1.	공익사업을 위한 용지보상	………	34
				2.	2013년도 시군도·농촌도로 확·포장사업 공사추진사업장 중 예산 미확보사업(이월및계속사업) 2013년도 준공된 사업현황 2013년도 신규사업현황	………	35
				3.	철도건널목입체화사업	………	37
				4.	산북천하천환경정비사업	………	38
				5.	소하천환경정비사업	………	39
				6.	국가하천유지관리사업	………	40
				7.	보안등신규설치	………	41
				8.	노후가로등정비	………	42
				9.	전북대인수공통전염병연구소진입로개설공사	………	43
				10.	위험도로구조개선사업	………	44

감사자료 과 공통사항

1. 2013 업무성과 및 반성

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	건설행정담당		박 종 환	□
작성자	:	도로시설담당		이 명 천	□
작성자	:	하천시설담당		최 선 우	□
작성자	:	하천관리담당		조 학 수	□
작성자	:	가로등관리담당		안 순 회	□

□ 성    과

□ 공익사업을 위한 용지 적극 협의보상으로 조기 착공에 기여

▸ 사업지구 22개소 1,599필지중 1,250필지 : 78%협의완료

□ 전북대 인수공통 전염병연구소 진입로 개설공사로 주민편익생활 기여

▸진입로 개설 공사 완료  :  2013. 9월

□ 자연과 생명이 살아 숨쉬는 하천 정비로 재해예방 및 시민 친수공간 조성

▸ 산북천 하천환경정비사업  :  2013. 12월

- 교량 1개소(L=65m, B=7.0m),     - 식생호안블럭 56,873㎡,

- 자연석 쌓기 20,000㎡중 14,756㎡ - 제방도로 포장 12.6km중 5.8km

- 생태습지 70,853㎡중 15,000㎡완료

▸ 용안 생태하천 꽃길조성(150백만원)

- 연꽃조성 및 코스모스 꽃길조성 완료 : 2013. 9월

□ 보안등 설치로 밝은거리 조성하여 여성,노약자 등에게 안전한 보행 환경조성

▸보안등 신규설치 469개소중 469개소(100%)

▸노후가로등 정비 143개소중 143개소(100%)

2. 2013 예산집행 및 추진사항

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	건설행정담당		박 종 환	□

2013 12. 31현재                                                                (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율 (%)	비고
건설과				26,223,547	20,165,474	6,058,073	77	본예 18,470 이월 7,753
	도로시설관리			8,890,057	7,181,422	1,708,635	81
		시군농어촌도로확포장		1,052,447	589,922	462,525	56
			왕궁군도19호 선형개량공사	41,000	40,442	558	99
			미불용지매입비	80,000	78,051	1,949	98
			오산북영선(금몽~남전)도로확포장공사	300,000	80,820	219,180	27	명시이월
			함열용왕교차로~삼기일반산업단지경계간도로확포장	320,000	108,300	211,700	34	명시이월
			고려온천아파트~왕궁온천간인도개설공사	70,000	67,179	2,821	96
			낭산맹동~신정간도로 확포장공사	221,447	215,130	6,317	97
			망성~신성관산간 도로확포장	20,000	0	20,000	0	명시이월
		철도건널목개량사업		4,931,545	3,691,175	1,240,370	75
			함열철도건널목 입체화사업	3,930,545	2,763,706	1,166,839	70	계속사업
			황등철도건널목 입체화사업	1,001,000	927,469	73,531	93	계속사업
		도로조명시설관리		2,906,065	2,900,325	20,240	99
			보안등신규설치	389,600	388,556	1,044	99
			노후가로등정비	121,500	121,384	116	99
			가로등보안등유지관리	2,350,482	2,346,748	3,734	99
			가로등보수차량 운영유지비	24,083	23,999	84	99
			주민편익증진사업보안등(보조)	20,400	19,638	762	96	도비보조사업

2. 2013 예산집행 및 추진사항

2013 12. 31현재                                                              (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율 (%)	비고
	지역개발관리			1,816,346	1,204,870	611,476	66
		주민숙원사업		605,474	590,492	14,982	98
			주민숙원사업	35,872	35,872	0	100	공통여비및업무추진비
			수의과대학진입로 도로개설공사	569,602	554,620	14,982	97
		교통관리개선사업		1,210,872	614,378	596494	51
			회전교차로사업	280,000	279,739	261	99
			위험도로구조개선사업	306,246	79,255	226,991	26	계속사업
			안전한보행환경조성사업	624,626	255,384	369,242	41	계속사업 도시개발과
	하천정비			14,726,403	11,526,751	3,199,652	78
		하천정비및유지관리		14,726,403	11,526,751	3,199,652	78
			하천제방유지보수	68,000	68,000	0	100
			하천제방유지보수(자체)	106,613	106,603	10	100
			소하천정비	5,693,856	4,615,428	1,078,428	81	명시이월
			산북천하천환경정비사업	7,751,250	5,932,792	1,818,458	77	계속사업
			지방하천기본계획수립	495,568	300,708	194,860	61	명시이월
			금강하천유지보수	63,561	63,561	0	100
			국가하천유지관리	547,555	439,659	107,896	81	명시이월
	하천재해정비사업			730,000	192,287	537,713	26
		재해예방사업		730,000	192,287	537,713	26	특별교부세 명시이월
	재무활동(보전지출)			8,152	8,147	5	99
	행정운영경비			52,589	51,997	592	98
		인력운영비		26,000	25,408	592	98
		기본경비		26,589	26,589	0	100

3. 2013 행정사무감사 사항 조치결과

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	건설행정담당		박 종 환	□
작성자	:	도로시설담당		이 명 천	□
작성자	:	가로등관리담당		안 순 회	□

연번	시정․개선사항	조치 (처리) 결과	비고
1	•계속사업 예산 관련 ▸시군도 농어촌 도로확․포장사업 추진이 몇 년째 답보상태에 있어 시민불편이 증가하고 있으므로 계속사업에 대하여는 최우선으로 사업예산을 확보하여 추진하기 바람.	▸계속사업 및 토지매입이 완료된 사업장부터 우선적으로 사업이 추진될 수 있도록 예산확보에 총력을 기울이고 있으나 재정여건상 어려움이 있음.	백경민김일영 황호열 성신용 조규대 임병술
2	•평화육교 재 가설사업 ▸익산시와 한국철도시설공단과 연계되는 익산역 지하차도, 동익산역 진입로, 군산선과 아파트와의 간격문제, 평화육교 재가설 사업에 대하여는 공단과 협의시 익산시민의 의견을 좀 더 강력히 요구하여 반영될 수 있도록 계획을 수립하기 바람.	▸국토교통부 및 한국철도시설공단에 강력 건의하고 있으며, 우리시가 원하는 방향대로 사업 추진 될 수 있도록 적극 노력 하고 있음.	이경애

연번	시정․개선사항	조치 (처리) 결과	비고
3	•예산신청 관련 ▸예산편성시 방지턱이나 보안등 신설과 같은 불요불급한 예산은 축소하고, 도로개설사업은 예산을 적극 확보하여 예산이 효과적으로 사용될 수 있도록 업무에 만전을 기하기 바람.	▸예산편성시 예산부서에 효율적인 사업성을 고려 검토 건의 하겠으며, 도로개설사업 예산확보에 적극 노력 하고 있음.	임병술
4	•시군농어촌도로 일부 미개설구간 관련 ▸시․군농어촌 도로 개설구간 중 일부구간이 미개설되어 무용지물인 도로가 있는 실정이므로 미개설구간의 일부 폭이라도 포장하여 도로로 활용할 수 있도록 특단의 조치를 강구하기 바람.	▸계속사업으로 추진중에 있는 시․군농어촌도로사업의 토지매입 추진율 순위별로 매입 토지를 활용할(교행노선 확보 등)예산편성 확보에 적극 노력 추진 하고 있으나 재정여건상 예산확보에 어려움이 있음.	조규대
5	•가로등․보안등 격등제 관련 ▸요즘 극심한 전력난으로 인한 비상사태가 발생할 수 있으므로 에너지 절감을 위하여 가로등․보안등 격등제 실시를 철저히 하여 주기 바람.	▸현재 격등제 노선을 선정하여 실시 하고있음.	백경민

연번	시정․개선사항	조치 (처리) 결과	비고
6	•가로등 관리 철저 ▸가로등이 가로수에 가려져 제 기능을 발휘하지 못하고 있으므로 관련부서와 협의하여 가지치기 등 가로등이 제 기능을 수행할 수 있도록 조치하기 바람.	▸야간 현지조사 실시후 도시공원과와 협의하여 가로수 가지치기 등 가로등 점검으로 시민들의 안전보행에 최선을 다하고 있음.	백경민

4. 2013 상급기관감사 지적사항에 대한 조치 결과

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	도로시설담당		이 명 천	□
작성자	:	하천시설담당		최 선 우	□

연번	공 사 명	지적사항	조치 (처리) 결과	수감기관	비고
1	함열용성철도 건널목 입체화사업 (토목분야) 추진 소홀	○지적사항 - 순성토 운반비 및 용수 개거시공에 따른 잔토 처리비를 반영하지 않아 공사수급자에게 손 초래 (51백만원) - 형식적인 정기안전점추진 ○ 처분요구 - 설계 미반영된 공사비 (51백만원) 추가 반영 - 실정보고 및 정기안전 점검을 소홀히 한 책임 감리원 건설기술관리 법령에 따라 행정 조치	○ 51백만원에 대하여는 설계변경 처리토록 지시(2013.9.2)하였으며 건설기술관리법에 따라 감리업무를 소홀이 한 책임감리원에게 시정 통보(건설기술리법 제 6조의4제2항 및 같은법 시행규칙 제11조)	감사원
2	산북천 하천환경 정비사업 추진 소홀	○연동제수문과 (구)학남교를 하천기본계획에 맞게 재가설 등의 조치 강구 ○하천관리용 도로를 포장할 경우 관련 시방서 준수 ○하천기능 저해되는 조경시설물 제외하고 433,002천원 감액	○연동제수문과 (구)학남교는 하천기본계획과 연계하여 검토중임. ○하천관리용 도로포장은 관련 시방서를 준수하여 시공함. ○조경시설물 433,002천원은 2013. 11월 설계변경시 감액 계획임.	감사원

5. 시정질문에 대한 조치결과

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	도로시설담당		이 명 천	□
작성자	:	가로등관리담당		안 순 회	□

【관리번호 : 173 - 2 - 2 】

일 시	2013. 12. 19. (제173회 제2차 정례회)	질문의원	최종오	답 변	시장
제 목	용연선 기반시설 미조성 관련 대책 및 방안			소관부서	건설교통국 (건설과, 도로관리과)
처리결과	완 결 ( ) 진 행 ( ○ ) 처리불가 ( )
▣ 질 문 요 지 ◦ 용연선 기반시설 미 조성 관련 대책 및 방안 ▸가로등 미 설치 및 인도 관리 미흡
▣ 답 변 내 용 ◦용연선 기반시설 미 조성 관련 대책 및 방안에 대해 답변 드리겠습니다. ▸용연선 도로개설 공사는 서부지역 교통량 분산과 지역균형 발전을 위해 2007년 시설한 도로로써, 관리가 미흡하여 통행에 불편을 초래하였습니다. ▸하지만, 농어촌도로의 가로등설치는 적은 교통량 및 이용자와, 야간불빛에 의한 농작물 생육장애와 같은 2차적인 피해등 주변 여건을 고려하여 조명시설은 설치하지 않았습니다. ▸따라서 용연선 개설 목적인 서부지역 교통량 분산 등 통행량 및 예산을 감안하여, 적절한 시기에 가로등을 설치하겠습니다. ▸또한 문제시되었던 가로수지지대와 인도시설에 대해서는 통행에 불편이 없도록 관리하겠으며, ▸주신 의견 소중히 수렴하여, 안전한 도로관리로 주민생활에 불편함이 없도록 노력하겠습니다.

【관리번호 : 173 - 2 – 2】

▣ 처 리 내 용

◦ 2012년 제2차 정례회 시정질문	…………… 2012. 12월
◦ 현장답사 및 사업비 추정(150백만원)	…………… 2013. 2월
◦ 2013년 1차 추경예산 편성요구	…………… 2013. 6월
◦ 2014년 본예산 편성요구(미반영)	…………… 2013. 9월

▣ 금 후 계 획

◦ 2014년 1차 추경예산 편성요구	…………… 2014. 6월
◦ 공사 발주 및 착공	…………… 2014. 10월
◦ 준공	…………… 2014. 12월

시정질문답변관리카드

【관리번호 : 173 - 3 - 1 】

일 시	2013. 12. 19. (제173회 제2차 정례회)	질문의원	성신용	답 변	시장
제 목	북부우회도로(서수~평장) 개설공사 관련			소관부서	건설교통국 (건 설 과)
처리결과	완 결 ( ◯ ) 진 행 ( ) 처리불가 ( )
▣ 질 문 요 지 ◦ 익산시의 중심부인 신동, 영등 1․2동, 어양동,삼성동, 팔봉동의 시가지를 가로 질러 통과하는 구간은 물류수송 대형차량이 군산국가공단 쪽으로 왕복하는 구간으로 물류수송 많으며, 시내 곳곳은 병목현상과 사고위험이 매우 높으며 신동, 영등1․2동, 어양동, 삼성동, 팔봉동은 익산시 인구의 3분의 1이 거주하는 지역 으로 통행 복잡한 도로로 익산지방국토관리청과 좀 더 긴밀한 협조 체계를 갖추고 익산북부우회도로 개설공사가 설계비 확보 등 다른 사업에 우선하여 신경써 주시기 바람.
▣ 답 변 내 용 ◦ 중앙부처를 수십 차례 방문하여 사업 필요성 설명한 결과 2012년 2월 국토해양부 제3차 국도건설 5개년(‘11~’15)계획」에 총사업비 2,947억원을 투입 계획으로 연장 17.7km, 4차선 신설 계획이 반영되었음 ◦ 우리시에서는 사업조기 착공을 위하여 국토교통부 및 익산지방국토관리청 수차례 방문 예산 확보 노력하여 2013년 11월에 기본 설계비가 반영되었음 ◦ 익산 북부우회도로 건설사업이 2019년 당초 계획대로 완료될 수 있도록 최대한 노력하겠음 ▣ 금 후 계 획 ◦ 익산북부우회도로 건설사업 조기완공 국가예산확보 지속 건의

시정질문답변관리카드

【관리번호 : 173 - 10 - 3 】

일 시	2013. 12. 19. (제173회 제2차 정례회)	질문의원	손문선	답 변	시장
제 목	평화육교에 대하여			소관부서	건설교통국 (건 설 과)
처리결과	완 결 ( ) 진 행 ( ○ ) 처리불가 ( )
▣ 질 문 요 지 ◦ 2014년 호남고속철의 개통을 앞두고 있는 상황에서 고속철도의 통행량이 증가됨에 따라 노후화가 가속화될 것이 예측되고, 붕괴 위험 등 시민안전이 우려되고 있는 상황에서 장기적인 대책이 수립되어야 한다고 봄 ◦ 이에 대한 익산시의 앞으로 대책에 대해서 말씀해 주시기 바람
▣ 답 변 내 용 ◦ KTX 개통 시기인 2014년 12월까지 교량을 보수․보강하여 사용키 위하여 2014년도 특별교부세 10억원을 신청하였고 예산이 확보되면 2014년 10월까지 보수․보강공사를 완료할 예정임 ◦ 정밀안전진단결과 D등급으로 결정된 평화육교에 대하여 정밀점검/년 1회, 정기 점검/년 2회 및 수시점검을 실시하고 있으며, 보수․보강 완료시까지는 통행안전 확보를 위하여 25톤 이상 차량의 통행제한 및 안내표지판 11개소를 설치하고 교각에 대하여 주1회 이상 기울기 계측과 과적 단속을 시행할 계획임 ▣ 처 리 내 용 ◦ 보수보강을 위한 실시설계 용역을 시행중이며, 2014년도 예산 10억원 확보(특별교부세 5, 시비 5) ◦ 중장기적으로 재가설 사업을 위한 국비지원 협의중(국토부 철도건설과) ▣ 금 후 계 획 ◦ 보수보강 공사 시행 : 2014년 10월 착수하여 2015년 12월 준공예정 ◦ 국비지원 확정시 2015년 기본 및 실시설계용역 시행후 2016년 재가설 공사 착수 예정.

6. 주요사업 조서(3천만원 이상)

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	도로시설담당		이 명 천	□
작성자	:	하천시설담당		최 선 우	□
작성자	:	하천관리담당		조 학 수	□
작성자	:	가로등관리담당		안 순 회	□

항목 14. 건설공사 집행현황과 같습니다.

7. 2013년도 각종 민원 접수처리내역

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	건설행정담당		박 종 환	□
작성자	:	하천관리담당		조 학 수	□

종류	건 명	민원인	요구내용	처 리 내 용
계	3건
진정	하천점용허가	윤정한	하천부지에 판넬집 불법건물 철거 계고장 선처 관련	○ 망성면 화산리 1308-1, 1172-1번지의 불법건축물은 하천법제33조를 위반하여 이는 심히 공익을 해 할것으로 인정됨으로불법건축물을 철거 토록 하였음.
진정	히말라야시다 (3주)나무제거요청	심재균	익산시 영등동 215-3번지내 히말라야시다 (3주)나무제거요청	○ 익산시 영등동 215-3번지내 히말라야시다(3주)나무제거는 도로관리과에서 처리하였음.
진정	보안등신규설치	이종일	모현동 머릿돌교회앞 주차장 보안등신규설치요청	○ 머릿돌교회 앞 주차장으로 사용하는곳은 보안등 신설에 필요한 전기 인입이 구조적으로 어려워 설치가 불가능함을 이해 시켰으며, 기존에 교회에서 설치한 투광등을 점등하여 주변을 밝히는 것이 타당함을 전달 하였음.

8. 기  금   운  영

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	건설행정담당		박 종 환	□
작성자	:	도로시설담당		이 명 천	□
작성자	:	하천시설담당		최 선 우	□
작성자	:	하천관리담당		조 학 수	□
작성자	:	가로등관리담당		안 순 회	□

기금운영 사항이 없습니다.

9. 위 원 회  운 영

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	건설행정담당		박 종 환	□
작성자	:	도로시설담당		이 명 천	□
작성자	:	하천시설담당		최 선 우	□
작성자	:	하천관리담당		조 학 수	□
작성자	:	가로등관리담당		안 순 회	□

위원회 운영 사항이 없습니다.

10. 용   역   사  업

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	도로시설담당		이 명 천	□
작성자	:	하천시설담당		최 선 우	□

일자	사 업 명	사업개요	예산액	계약액	계약자	납품일자	용역기간	비고
2013.7.15	함열용왕교차로~삼기일반산업단지경계간도로확포장실시설계용역	소규모환경영향평가외 5식	320,000	285,310	㈜태영기술공사외 5개업체	용역중지	2013.7.15.~2014.12
2013.5.10	익산천 하천기본계획수립 및 전략환경영향평가	기본계획 및 전략환경영향평가 12.6lm	480,000	452,440	㈜이산 이원찬 외 1개사	-	‘13.5.14~ ‘14.9.30	지방하천 심의중 (전라북도)

(단위 : 천원)

11. 각종 사회단체 보조금지원

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	건설행정담당		박 종 환	□
작성자	:	도로시설담당		이 명 천	□
작성자	:	하천시설담당		최 선 우	□
작성자	:	하천관리담당		조 학 수	□
작성자	:	가로등관리담당		안 순 회	□

각종 사회단체 보조금 지원내역이 없습니다.

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	건설행정담당		박 종 환	□
작성자	:	도로시설담당		이 명 천	□
작성자	:	하천시설담당		최 선 우	□
작성자	:	하천관리담당		조 학 수	□
작성자	:	가로등관리담당		안 순 회	□

12. 인․허가민원

인․허가 민원내역이 없습니다.

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	도로시설담당		이 명 천	□
작성자	:	하천시설담당		최 선 우	□

13. 각종 공사설계 변경상황

(단위 : 천원)

연번	사업명	예산액	계약액 (변경액)	계약자	계약 일자	변경 일자	공 사 기 간	변경사유
1	산북천 하천환경정비사업	7,751,250	7,433,295 (7,388,334)	(주)동성 송기태	2011.8.27	2013.2.25. 2013.12.20	2011.8.31. ~ 2015.7.30	물가변동으로 인한 계약금액 조정 및 물량변경
2	목천포천 상습 수해지구 하천 정비공사	700,000	417,480 (496,995)	(유)수목토건설 소용의	2013.10.8	2014.3.28	2013.10.11. ~ 2014.4.24	연약지반으로 인한 호안기초 보강
3	택촌천 소하천 정비공사	2,586,366	1,417,826 (1,441,506)	㈜성웅종합건설 박영자	2012.11.28	2013.8.30.	2012.12.4. ~ 2014.8.29	현장여건에 따른 물량변경
4	신서원천 소하천 정비공사	1,345,000	1,109,285 (1,143,423)	호남건설(주) 최자영	2012.3.23	2013.11.22	2012.3.29. ~ 2014.2.3	현장여건에 따른 물량변경
5	석왕천 소하천정비공사	1,424,000	1,113,849 (1,123,287)	(유)청신 이상열	2013.1.28	2013.7.8	2013.2.1. ~ 2013.11.15	현장여건에 따른 물량변경

14. 건설공사 집행현황(3천만원 이상)

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	도로시설담당		이 명 천	□
작성자	:	하천시설담당		최 선 우	□
작성자	:	하천관리담당		조 학 수	□
작성자	:	가로등관리담당		안 순 회	□

(단위 : 천원)

연번	사 업 명	사업량	예산액	집행액	잔액	집행률 (%)	비고
	계	21건	22,997,343	17,315,638	5,681,705	75
1	왕궁군도19호 선형개량공사	L= 70m B= 7m→10.5m	41,000	40,442	558	99
2	오산북영선(금몽~남전)도로확포장공사	L= 530m B= 8m	300,000	80,820	219,180	27
3	함열용왕교차로~삼기일반산업단지경계간 도로확포장	L= 3.7㎞ 2차선~4차선확장	320,000	108,300	211,700	34
4	고려온천아파트~왕궁온천간인도개설공사	L= 360m B= 1.5m	70,000	67,179	2,821	96
5	낭산맹동~신정간 도로확포장공사	L= 1.78㎞ B= 8m	221,447	215,130	6,317	97
6	망성신성~관산간 도로확포장	L= 0.91㎞ B= 7m	20,000	0	20,000	0
7	함열철도건널목 입체화사업	L= 1.58㎞ B= 8~13m	3,930,545	2,763,706	1,166,839	70
8	황등철도건널목 입체화사업	L= 0.95㎞ B= 15.4m	1,001,000	927,469	73,531	93
9	보안등신규설치	익산시일원	389,600	388,556	1,044	99
10	노후가로등정비	익산시일원	121,500	121,384	116	99

연번	사 업 명	사업량	예산액	집행액	잔액	집행률 (%)	비고
11	전북대수의과대학 진입로 도로개설공사	L=1.6㎞ B=8m	569,602	554,620	14,982	97
12	회전교차로사업	왕궁면 주민센터앞 1식	280,000	279,739	261	99
13	위험도로구조개선사업	도로선형개량 L=1.99㎞ B=8.0m	306,246	79,255	226,991	26
14	하천제방유지보수	익산시 하천제방일원	68,000	68,000	0	100
15	하천제방유지보수(자체)	익산시 하천제방일원	106,613	106,603	10	100
16	소하천정비	4개하천 L=6.38㎞	5,693,856	4,615,428	1,078,428	81
17	산북천하천환경정비사업	생태하천조성 L=6.64㎞	7,751,250	5,932,792	1,818,458	77
18	지방하천기본계획수립	익산천, 송천 기본계획 수립 L=15.22㎞	495,568	300,708	194,860	61
19	금강하천유지보수	금강하천유지보수 1식	63,561	63,561	0	100
20	국가하천 유지관리	금강,만경강, 강경천34.2㎞	547,555	439,659	107,896	81
21	재해예방사업 (목천포천상습 수해지구하천 정비사업)	하천정비 L=2.0km	700,000	162,287	537,713	23

15. 중소기업 물품구입현황(3천만원이상)

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	건설행정담당		박 종 환	□
작성자	:	도로시설담당		이 명 천	□
작성자	:	하천시설담당		최 선 우	□
작성자	:	하천관리담당		조 학 수	□
작성자	:	가로등관리담당		안 순 회	□

중소기업 진흥 및 제품 구매 촉진에 관한 법률에 의한 물품구입 내역이 없습니다.

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	건설행정담당		박 종 환	□
작성자	:	도로시설담당		이 명 천	□
작성자	:	하천시설담당		최 선 우	□
작성자	:	하천관리담당		조 학 수	□
작성자	:	가로등관리담당		안 순 회	□

16. 민간에 대한 보조금 집행내역

민간에 대한 보조금 집행내역 없습니다.

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	도로시설담당		이 명 천	□
작성자	:	하천시설담당		최 선 우	□
작성자	:	하천관리담당		조 학 수	□

17. 국․도비 보조사업 집행현황(1억원이상)

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	사업량	예산액	집행액	잔 액	집행률 (%)	비 고
	계	7건	15,804,475	11,839,868	3,964,607	75
1	회전교차로사업	왕궁면 주민센터앞 1식	280,000	279,739	261	99
2	위험도로구조 개선사업	도로선형개량 L=1.99㎞ B=8.0m	306,246	79,255	226,991	26
3	소하천정비사업	4개하천 L=6.38㎞	5,693,856	4,615,428	1,078,428	81
4	산북천하천환경 정비사업	생태하천조성 L=6.64㎞	7,751,250	5,932,792	1,818,458	77
5	지방하천기본 계획수립	익산천, 송천 기본계획 수립 L=15.22㎞	495,568	300,708	194,860	61
6	국가하천 유지관리	금강,만경강, 강경천 34.2㎞	547,555	439,659	107,896	81
7	목천포천상습 피해지구 하천정비사업	하천정비 L=2.0km	730,000	192,287	537,713	26

8. 명시 및 사고이월사업비 집행내역

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	도로시설담당		이 명 천	□
작성자	:	하천시설담당		최 선 우	□
작성자	:	하천관리담당		조 학 수	□

(단위 : 천원)

연번	사업명	사업량	예산액	집행액	잔액	집행률(%)	비고
	계	8건	1,296,345	1,054,372	241,973	81
1	낭산맹동 신정간 도로확포장	L=1.78㎞ B=8m	206,447	206,447	0	100
2	전북대수의과대학 진입로개설공사	L=1.6㎞ B=8m	569,602	554,620	14,982	97
3	위험도로구조 개선사업	도로선형개량 L=1.99㎞ B=8.0m	306,246	79,255	226,991	26
4	하천제방유지보수(자체)	익산시 하천제방일원	42,877	42,877	0	100
5	소하천정비	4개하천 L=6.38㎞	56,489	56,489	0	100
6	지방하천기본 계획수립	송천 하천기본계획 수립 L=2.62㎞	15,568	15,568	0	100
7	금강하천유지보수	금강하천유지보수1식	63,561	63,561	0	100
8	국가하천유지관리	금강,만경강, 강경천34.2㎞	35,555	35,555	0	100

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	건설행정담당		박 종 환	□
작성자	:	도로시설담당		이 명 천	□
작성자	:	하천시설담당		최 선 우	□
작성자	:	하천관리담당		조 학 수	□
작성자	:	가로등관리담당		안 순 회	□

19. 예산전용 사항 및 예비비 집행현황

각종 예산전용 및 예비비집행 내역이 없습니다.

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	도로시설담당		이 명 천	□
작성자	:	하천시설담당		최 선 우	□

20. 공사 준공기한 연장내역

공사준공기한 연장 내역이 없습니다.

21. 국․도비 예산중 사업미시행으로 전액 반납한 현황

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	도로시설담당		이 명 천	□
작성자	:	하천시설담당		최 선 우	□
작성자	:	하천관리담당		조 학 수	□
작성자	:	가로등관리담당		안 순 회	□

국․도비 예산 중 사업미시행으로 전액 반납한 현황이 없습니다.

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	하천관리담당		조 학 수	□
작성자	:	가로등관리담당		안 순 회	□

22. 국․도비 반납현황(항목별 반납사유 명시)

(단위 : 천원)

연번	사 업 명	예산액	집행액	반납액	비고
	2건	466,000	집행399,681 이월 63,561	2,758
1	국가하천유지관리보수사업(국비)	420,000	집행353,826 이월 63,561	2,613
2	익산 북부권 보안등 설치(도비)	46,000	45,855	145

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	도로시설담당		이 명 천	□
작성자	:	하천시설담당		최 선 우	□
작성자	:	하천관리담당		조 학 수	□

23. 2013년도 계획사업중 미착공사업 현황

(단위 : 백만원)

구분	위치	사 업 명	사 업 개 요 (km, m)	사업 기간	총 사 업 비(백만원)					사업 구분	공정	비고
					계	기투자	2011 이월	2012	금 후 투 자
					해	당	없	음

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	도로시설담당		이 명 천	□
작성자	:	하천시설담당		최 선 우	□
작성자	:	하천관리담당		조 학 수	□

24. 2013년도 계획사업중 유보 및 취소된 사업현황

2013년 계획사업중 유보 및 취소된 사업이 없습니다.

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	도로시설담당		이 명 천	□
작성자	:	하천시설담당		최 선 우	□
작성자	:	하천관리담당		조 학 수	□

25. 2013년도 이월사업중 유보 및 취소된 사업

2013년도 이월사업중 유보 및 취소된사업 없습니다

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	도로시설담당		이 명 천	□
작성자	:	하천시설담당		최 선 우	□
작성자	:	하천관리담당		조 학 수	□
작성자	:	가로등관리담당		안 순 회	□

26. 2013년도 예산편성 후 전액 미집행내역

(단위 : 백만원)

구분	위치	사 업 명	사 업 개 요 (km, m)	사업 기간	총 사 업 비(백만원)					사업 구분	공정	비고
					계	기투자	2011 이월	2012	금 후 투 자
					해	당	없	음

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	도로시설담당		이 명 천	□

27. 소 송 사 건  현 황

사건번호	사건명	원 고	피 고	접수일	변호사 선임사항	추진사항 (판,종결일)
익산2013가소12178 (익산시법원)	구상금청구의 소	엘아이지손해보험(주)	익산시장	2013.8.19	무	화해권고로소취하 민사소송종결(2014.1.20.)

28. 시홈페이지에서 접수된 민원처리 현황

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	건설행정담당		박 종 환	□
작성자	:	도로시설담당		이 명 천	□
작성자	:	하천시설담당		최 선 우	□
작성자	:	하천관리담당		조 학 수	□
작성자	:	가로등관리담당		안 순 회	□

□ 민원접수 현황

부서명	시 정 에 바 란 다		비고
	접수(건)	처리(건)
건설과	39	39

□ 주요처리현황

◦ 보안등 설치 관련 민원         :  27건

◦ 도로개설 및 확포장 관련 민원  :   9건

◦ 기타 민원                     :   6건

29. 각종 보조금 지급내역(지급대상자 명단)

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	건설행정담당		박 종 환	□
작성자	:	도로시설담당		이 명 천	□
작성자	:	하천시설담당		최 선 우	□
작성자	:	하천관리담당		조 학 수	□
작성자	:	가로등관리담당		안 순 회	□

각종 보조금 대상자 없습니다.

감사자료 과 요구사항

1. 공익사업을 위한 용지보상

확인자	:	건 설 과 장		김 용 주	□
작성자	:	건 설 행 정 담 당		박 종 환	□

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 장 : 22개 사업장

(건설과 11 ,도시개발과 8 ,타기관 3 )

◦ 보상대상 : 1,599필지 , 499,982㎡

◦ 보상금액 : 32,365백만원

□ 추 진 실 적

◦ 토지매입실적 (78%) :   22개소 /   1,250필지  /  319,468㎡

◦ 보상계획 열람공고  :     2개소 /     79필지  /   23,031㎡

◦ 감정평가 실시  :   28개소 /    447필지  /   87,826㎡

◦ 토지수용재결신청   :    5개소 /    44필지   /    4,454㎡

▸인화스파리스 제이파크간 도로개설, 낭산맹동~신정간도로개설사업

▸전북대 인수공통 전염병 연구소 진입로개설공사,

▸위험도로구조개선사업(금마저수지), 장신~송학간 도로 확․포장공사

□ 기 대 효 과

◦ 시민에게 다가서는 보상행정으로 양질의 서비스 제공

◦ 공익사업을 위한 적극 협의보상 도로망 확충으로 도시발전 기여

확인자	:	건 설 과 장		김 용 주	□
작성자	:	도로시설담당		이 명 천	□

2. 2013년도 시군도 농촌도로 확포장 사업

□ 2013 이월사업 및․ 계속사업  - - 19개사업

(단위:m, 백만원)

사 업 명		사업개요	사업기간	예산액					이월사유 및 공정
				총 사업비	기투자	이월액	2013 예산	금 후
합 계		19개노선 L=27.23㎞		37,711	6,617		300	30,794
자체사업	함라 수동~금곡간 도로확.포장	L=1.23km B=7~8m	2003. 01 ~ 2015. 12	2,015	693			1,322	용지 99%
	오산 북영선 도로확.포장	L=1.7km B=8m	2006. 01 ~ 2017. 12	2,251	826		300	1,125	공사중 (30%)
	여산 신리~호월간 도로확.포장	L=1.3km B=8m	2004. 01 ~ 2015. 12	1,388	189			1,199	용지 67%
	삼성동 하나로~ 외화간도로확.포장	L=1.55km B=8m	2002. 01 ~ 2016. 12	3,180	730			2,450	용지 63%
	오산 신수선 도로확.포장	L=1.5km B=7m	2007. 01 ~ 2016. 12	1,079	879			200	용지 93%
	오산 장신~만석간 도로확.포장	L=1.6km B=8m	2004. 01 ~ 2016. 12	1,786	274			1,512	용지 87%
	용동 삼정~두무간 도로확.포장	L=1.21km B=8m	2003. 01 ~ 2016. 12	1,847	76			1,771	용지 73%
	함라 진등 진입로 개설	L=1.43km B=6.5m	2004. 01 ~ 2016. 12	1,063	145			918	용지 85%
	함라 칠성~다은간 도로확.포장	L=1.0km B=6.5m	2003. 01 ~ 2016. 12	975	190			785	용지 85%
	오산 모산선(신모선) 도로확.포장	L=1.87km B=6.5m	2004. 01 ~ 2016. 12	2,096	212			1,884	용지 85%
	망성 군도10호~ 금지간 도로확.포장	L=1.2km B=8m	2004. 01 ~ 2017. 12	1,872	180			1,692	용지 66%

사 업 명		사업개요	사업기간	예 산 액					이월사유 및 공정
				총 사업비	기투자	이월액	2013 예산	금 후
자체사업	왕궁 군도26호선 도로확.포장	L=1.7km B=8m	2007. 01 ~ 2017. 12	2,970	577			2,393	용지 75%
	망성 신성~관산간 도로확.포장	L=0.91km B=7m	2004. 01 ~ 2017. 12	1,365	306			1,059	용지 68%
	금마 갈산~서편간 도로확.포장	L=1.6km B=8m	2004. 01 ~ 2017. 12	2,829	229			2,600	용지 45%
	왕궁 가좌마을 진입로확.포장	L=0.7km B=8m	2007. 01 ~ 2017. 12	1,116	103			1,013	용지 63%
	금마 누동~신촌간 도로확.포장	L=0.93km B=8m	2003. 01 ~ 2017. 12	1,411	405			1,006	용지 56%
	왕궁 평화촌~평리간 도로확.포장	L=1.3km B=8m	2004. 01 ~ 2017. 12	3,445	180			3,265	용지 52%
	왕궁 온수~시대간 (황암~상발)확.포장	L=3.0km B=8m	2009. 01 ~ 2017. 12	2,803	296			2,507	용지 57%
	춘포 토다리~덕동간 도로확.포장	L=1.0km B=6.5m	2004. 01 ~ 2017. 12	2,220	127			2,093	용지 9%

□ 2013년 준공된 사업 -  없음

□ 2013년도 신규사업 - 1개사업

사 업 명	개 요	사 업 기 간	사 업 비 (백만원)					공 정	비 고
			총 사업비	기투자	이월액	2013 예산	금후
합 계	1개사업 L=3.7㎞		320	-		320
함열용왕교차로~삼기 일반산업단지간 (군도23호) 도로확 포장공사용역	L=3.7㎞ 2차로 ⇒4차로 확장	2013. 01 ~ 2014. 12	320			320		80%

3.

확인자	:	건 설 과 장		김 용 주	□
작성자	:	도로시설담당		이 명 천	□

철도건널목 입체화사업

□ 사 업 개 요

◦ 함열용성 철도건널목 입체화사업

▸ 개    요 : 도로(L=1.58㎞, B=8~13m)  교량(1개소/140m)

▸ 사 업 비 : 18,170백만원(시설공단 13,627, 익산시 4,543)

- 2013년까지 확보액 : 16,207백만원(시설공단 12,822, 익산시 3,385)

- 예산 미 확보액    :  1,963백만원(시설공단   805, 익산시 1,158)

▸ 공사기간 : 2010. 05 ~ 2014. 12.

▸ 시 행 청 : 익산시청         ▸ 현 공 정 : 84%

◦ 황등동연 철도건널목 입체화사업

▸ 개    요 : 도로(L=0.95㎞, B=15.4m)  지하차도(2개소/580m)

▸ 사 업 비 : 27,402백만원(시설공단 20,551, 익산시 6,851)

- 2013년까지 확보액 : 19,364백만원(시설공단 16,825, 익산시 2,539)

- 예산 미 확보액    :  8,038백만원(시설공단  3,727, 익산시 4,311)

▸ 공사기간 : 2010. 12 ~ 2014. 12

▸ 시 행 청 : 한국철도시설공단   ▸ 현 공 정 : 57%

□ 추 진 실 적

◦ 함열 용성 - 보강토 옹벽 설치 및 보조기층 포설   :  2013. 3 ~ 10

◦ 황등 동연 - 토공 및 동연지하도(BOX) 구조물 설치  :  2013. 3 ~ 10

□ 금 후 계 획

◦ 2013년 시비 분담금 미 확보로 건널목입체화 사업 이월

4. 산북천 하천환경정비사업

확인자	:	건 설 과 장		김 용 주	□
작성자	:	하 천 시 설 담 당		최 선 우	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 용안면 금강 합류점 ~ 낭산면 죽정천 합류점

◦ 사업기간 : 2010 ~ 2015

◦ 사 업 비 : 30,000백만원(국비 18,000, 도비 6,000, 시비 6,000)

▸ 기투자 15,295,  4,000(2013년),  금후투자 10,705

◦ 사업내용 : 생태하천조성 L=6.64km

▸ 교량 1개소, 호안, 습지조성, 제방도로 등

◦ 현 공 정 : 70%

□ 추 진 실 적

◦ 교량 1개소(L=65m, B=7.0m)         완료

◦ 식생호안블럭  56,873㎡중   56,873㎡ 완료

◦ 자연석 쌓기   20,000㎡중   14,756㎡ 완료

◦ 제방도로 포장  12.6km중     5.8km 완료

◦ 생태습지      70,853㎡중   15,000㎡ 완료

□ 금 후 계 획

◦ 산북천 하천환경정비사업 준공(전체분)   :     2015. 12

5. 소 하 천 정 비 사 업

확인자	:	건 설 과 장		김 용 주	□
작성자	:	하천시설 담 당		최 선 우	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 팔봉 석왕동(석왕천), 금마 용순리(신서원천), 성당 성당리(택촌천)

◦ 사업기간 : 2009. 1. ~ 2015. 12

◦ 사 업 비 : 16,405백만원(국비 8,202  시비 8,203)

▸ 2013년 사업비 : 5,537백만원(국비 2,768, 시비 2,769)

◦ 사업내용 : 소하천정비 4개 하천 L=6.38km 및 토지보상

사 업 명	사 업 량	사업비(백만원)	사업기간
석 왕 천	소하천정비 L=3.27km	6,309	2009. 1 ~ 2013.12
신서원천	소하천정비 L=1.0km	2,490	2012. 1 ~ 2014. 02
택 촌 천	소하천정비 L=1.04km	3,200	2012. 1 ~ 2014.12
신 평 천	소하천정비 L=1.07km	3,668	2013. 12 ~ 2015. 12

□ 추 진 실 적

구분	사업명	사업량	사업비 (백만원)	추진실적	구분
2012년 까지	석왕천	소하천정비 L=2.65km	4,966	- 호안정비 L=2.65km - 교량8개소
	신서원천	소하천정비 L=0.4km	1,145	- 호안정비 L=0.4km
	택촌천	실시설계 및 보상	500	- 설계완료- 토지보상
2013년	석왕천	소하천정비 L=0.62km	1,424	- 호안정비 L=0.4km - 교량2개소	100%
	신서원천	소하천정비 L=0.6km	1,345	- 교량2개소 시공중	90%
	택촌천	소하천정비 L=0.6km	2,586	- 호안정비 L=0.2km - 교량1개소 시공중	60%
	신평천	소하천정비 L=0.6km	182	- 설계완료 L=1.07km	5%

6. 국가하천 유지관리사업

확인자	:	건 설 과 장		김 용 주	□
작성자	:	하천관리담당		조 학 수	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 국가하천 (금강, 만경강, 강경천) : 34.2㎞

▸ 금강 21,260m, 만경강 10,400m, 강경천 2,540m

◦ 사업기간 : 2013. 01 ~ 2013. 12.

◦ 사 업 비 : 538백만원(국비 100%)

◦ 사업내용

▸ 국가하천(금강, 만경강,강 경천) 유지관리

□ 추 진 실 적

◦ 금강 생태하천 꽃길조성 완료

▸ 코스모스 꽃길조성 L=9.5㎞, 연꽃식재 7,000주

◦ 금강 생태하천 산책로 보강공사 완료

▸ 블록포장 442㎡, 콘크리트 포장 473㎡

◦ 금강 생태하천 공공근로 인부 사역 시행 완료

▸ 인부사역 : 용안, 성당면 인근지역 주민

▸ 사역내용 : 생태하천 환경정비사업(풀깍기, 예초, 꽃길조성지 관리 등)

▸ 사역기간 : 2013년 6월 ~ 9월

▸ 인    원 : 20명

◦ 금강 생태하천 보강공사 완료

▸ 침수지역 정비 L=173m, 콘크리트 포장 L=339m, 연꽃식재 1,500주

7. 보안등 신규설치

확인자	:	건 설 과 장		김 용 주	□
작성자	:	가로등관리담당		안 순 회	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 :  익산시 일원

◦ 사 업 비 :  409백만원

◦ 사업기간 :  2013. 1. ~ 2013. 12.

◦ 보안등 신규 설치공사 내역

구 분	사 업 개 요	예산(천원)	비 고
합 계	469개소	409,000
시민불편해소 보안등신설	보안등 설치 20개소	13,400
산책로정비 보안등신설	보안등 설치 31개소	62,000
생활환경 개선사업	보안등 설치 215개소	180,600	주민참여편성예산
소규모 주민숙원사업	보안등 설치 184개소	132,600
주민편익 증진사업(도비)	보안등 설치 19개소	20,400	도비

□ 추 진 실 적 (407,436천원, 99.6%)

◦ 보안등 신설 : 469개소

▸ 보안등 신규설치(시비, 387,798천원)…………………… 450개소

▸ 보안등 신규설치(도비, 19,638천원)……………………… 19개소

8. 노후 가로등 정비

확인자	:	건 설 과 장		김 용 주	□
작성자	:	가로등관리담당		안 순 회	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  :  익산시 일원

◦ 사 업 량  :  5개 사업

◦ 사 업 비  :  120백만원

◦ 사업기간  :  2013. 1.  ~  2013. 12.

◦ 노후가로등 정비 사업내역

구분	위 치	사 업 명	사 업 개 요	예산(천원)	비고
합 계		5개 사업		120,500
노후가로등정비	시내일원	도심지역 도로조명 노후선로 정비	가로등 지중선로(누전)정비	40,000
	시내일원	노후 가로등 점멸기 교체	분전함(점멸기) 교체	22,500
	시내일원	노후 보안등기구 교체	보안등기구 교체	28,000
	산업단지	산업단지 및 자유지역 노후선로 정비	노후 선로정비	20,000
	시내일원	우기대비 가로등 안전진단 부적합 전기시설 보수	부적합 전기시설보수	10,000

□ 추 진 실 적(120,393천원, 99.9%)

◦ 노후 가로등 점멸기 교체(21,215천원)	5개소 교체 완료

◦ 가로등 노후선로 정비(63,136천원)	58개소 보수 완료

◦ 가로등 안전점검 누전선로보수(8,700천원)	7개소 보수 완료

◦ 노후 보안등기구 교체(27,342천원)	73개소 교체 완료

9. 전북대인수공통전염병연구소 진입로개설공사

확인자	:	건 설 과 장		김 용 주	□
작성자	:	도로시설담당		이 명 천	□

□ 사 업 개 요

◦ 개   요  : 도로개설(L=1.6㎞, B=8m)  ※ 도로부지 20m확보

◦ 위   치  : 익산시 삼기면 용연리 ~ 월성동

◦ 사 업 비 : 4,543백만원(특별교부세 1,400 ․ 시비 3,143)

◦ 공사기간 : 2011. 12 ~ 2013. 09

◦ 현 공 정 : 100%

□ 추 진 실 적

◦ 도로포장 및 부대공사 추진                :  2013. 6. ~ 2013. 09.

◦ 공 사  준 공                             :  2013.  09.

10. 위험도로 구조 개선사업

확인자	:	건 설 과 장		김 용 주	□
작성자	:	도로시설담당		이 명 천	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 금마면 서고도리, 신용리 일원(금마저수지 옆)

◦ 사 업 량 : 도로선형개량 L=1.99Km, B=8.0m(4개 공구)

▸1공구 L=0.3km, 2공구 L=1.06km, 3공구 L=0.3km, 4공구 L=0.3km

◦ 사 업 비 : 760백만원 (국비380, 시비380)

▸이월사업비 306백만원(명시94, 사고212)

◦ 사업기간 : 2012. 01 ~ 2014. 12.

□ 추진실적

◦ 2, 3공구 공사준공     :  2012년 완공

◦ 1, 4공구 추진

▸ 편입토지 협의불응 7필지 872㎡(소유자 3명)

◦ 토지수용 재결신청     :  2013. 09

□ 마무리대책

◦ 토지수용 후 마무리 공사추진(1공구, 4공구)  :  2014. 12