2014. 10.

2014 주요업무 결산보고

	안전행정국

순   서

□	기획예산과	……	1
□	안전총괄과	……	21
□	세무과	……	39
□	징수과	……	51
□	회계과	……	63
□	지식정보과	……	75
□	행정지원과	……	89

안전총괄과

□	일 반 현 황
□	2014 주 요 업 무
□	2015 신 규 시 책

일   반   현   황

□ 기       구

				안전총괄과
안 전 총 괄			안 전 관 리				민 방 위			재 난 방 재

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별							비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	계약
정 원	18		1	4	7	0	6
현 원	18		1	6	8	2	1		청경 2 무기 1
증 감				2	1	2	△5

□ 업 무 분 장

담 당	업 무 분 장 사 항
안전총괄	안전 총괄업무 관리, 재난안전 관리정책 총괄 조정, 지역재난대책본부 및 재난현장통합지휘소 운영【사회재난(국가기반, 감염, 전염병 관련)】, 안전문화운동 추진, 익산시자율방재단 관리, 유도선 및 수상레저, CCTV설치, CCTV 통합관제센터 운영, 재난관리기금 운영, 국제안전도시 인증
안전관리	재난현장통합지휘소 운영【자연, 사회재난 (인적)】, 지역단위 재난예방 및 안전관리계획 수립, 대형사고 예방 및 시설물 안전진단, 안전교육, 특정 관리대상 시설물 안전관리, 배수장 관리, 국가재난관리 정비시스템 운영(NDMS), 재난안전상황실 운영, 재난상황 대응계획 수립운영(가뭄. 폭염 대책수립 등)
민 방 위	국가 비상대비 훈련 추진, 통합방위협의회 및 방위지원본부 운영, 충무계획 수립, 비상시 인적․물적 동원 자원관리, 주민 신고망 운영, 민방위 기본계획 수립, 민방위대원 교육훈련 실시, 민방위 비상시설 점검관리, 사회복무요원 관리
재난방재	풍수해 상황 접수 및 피해 긴급 복구, 풍수해예방 및 복구공사 설계. 감독, 재해 및 피해상황 전문 조사반 운영, 재해위험지구지정 및 정비사업 추진, 익산시 풍수해 종합계획수립 운영, 붕괴위험지역 지정 및 관리

□ 특정관리대상시설 현황

(단위:개소)

구 분	관리대상 시 설 물	중점 관리대상				재난 위험시설
		계	A	B급	C급	계	D급	E급
합 계	891	889	205	650	34	2	2
시 설 물	57	56	2	29	25	1	1
건 축 물	834	833	203	621	9	1	1

□ 자연재해 저감시설 현황

(단위:개소)

구 분	계	하 천	배수펌프장	수 문	저수지	육교․교량
계	332	89	12	10	111	110

□ 민방위 시설장비 현황

시설명	경 보 사이렌	대피시설		비상급수		장비확보상황
		정부지원	민간․공공	정부지원	공공용 시설	일 반	방독면
개 소	12개소	2개소	85개소	6개소	45개소	1,158점	11,688점

□ CCTV 설치 현황

구 분	설 치 대 수
	총 계	방 범 용	차량번호 판 독 용	아동용	어 린 이 보호구역
개 소	232	82	26	61	63
대 수	559	153	52	110	244

□ 위원회 현황

계	안전 관리 위원회	재난관리기금 운용 심의 위원회	사전재해영향성검토 위원회	비 고
3개/ 49명	17명	9명	23명	□익산시 안문협(30명)
	▸위원장 : 익산시장 ▸위 원 : 관련부서 및 유관 기관(16명)	▸위 원 장 : 부시장 ▸부위원장 : 안전행정국장 ▸위 원 : 해당부서장, 교수 등(7명)	▸시의원, 교수 등	□익산시 지역자율방재단(156명) □통합방위협의회(10명) □치안협의회(19명)

2014 주요업무

		맞춤형 교육과 사전점검으로 안전문화정착 24시간 재난상황 관리로 철저한 대비 배수펌프장 이중화선로 구축사업 재해위험지구 정비사업 모현지구 우수저류시설 설치사업 CCTV 통합관제센터 운영

1		맞춤형 교육과 사전점검으로 안전문화 정착

	사전 예방활동을 통해 안전의식향상을 도모하고, 지속적․능동적인 홍보와 맞춤형 교육 및 안전점검으로 안전문화 정착

□ 사 업 개 요

◦ 맞춤형 안전문화교육 : 사고인지 및 대처능력 취약계층(학생, 노인 등)

◦ 재난취약계층 안전점검  :  전기 및 가스시설

◦ 안전점검의 날(매월 4일) 운영 : 안전문화캠페인(생활안전․산불․풍수해 등)

□ 추 진 실 적

◦ 맞춤형 안전교육 수요조사	:  2014. 04.

▸미륵초등학교 등 26개교 3,800명 교육 신청

◦ 안전교육 강사 추천의뢰	:  2014. 05.

▸익산경찰서, 익산소방서, 도로교통공단, 전기안전공사, 전북에너지서비스(주)

◦ 안전교육 실시	:  2014. 05. ~ 09.

▸웅포초등학교 등 26개교 3,800명

◦ 안전점검의 날 행사 추진	:  2014. 01. ~ 09.

▸9회/820명 참여, 안전관련 홍보물 35,000매 배부

□ 마무리 대책

◦ 어르신 대상 교육 수요조사 및 교육실시	:  2014. 10. ~ 11.

2		24시간 재난상황 관리로 철저한 대비

	재난유형별 상황단계(예방, 대비, 대응, 복구)에 신속하고 체계적인 통합대응과 시설물 유지관리로 재난을 예방하고 피해를 최소화

□ 사 업 개 요

◦ 재난상황별 비상근무(단계별 실무반 편성 운영)

▸상시대비 재난상황실 24시간 운영 (2명 근무/상황관리)

- 기상 상황에 따른 사전대비, 비상1·2·3단계 근무

▸자연재난대책기간 : 여름철(5.15~10. 15), 겨울철(12. 1.~익년 3. 15)

▸응급복구 및 피해조사 : 민․관 합동 피해조사반 편성 운영

◦ 재난발생에 따른 재난현장 통합지휘소 설치·운영

▸통합지휘소장 : 부시장

▸임무 : 재난현장 상황에 맞는 통합 대응

▸단계별 재난현장 통합대응(상황전파,현장출동,현장조치,긴급복구)

◦ 배수펌프 및 배수문 시설 유지관리(펌프9개소, 수문10개소)

▸호우 및 태풍에 대비한 배수펌프 및 배수문 관리

□ 추 진 실 적

◦ 재난상황별 비상근무

▸단계별 비상근무자 명단 확정     :  2014. 02. 27.

◦ 재난발생에 따른 재난현장 통합지휘소 설치·운영

▸통합지휘소 설치 운영 조례 제정  :  2014. 03. 14.

▸재난현장 통합지휘소 비상연락망 작성

- 익산경찰서, 익산소방서, 제7557부대 외 9개 기관

◦ 배수펌프 및 배수문 시설 유지관리

▸배수펌프 및 배수문 전기 투입	: 2014. 05. 02.

▸배수펌프장 전기설비 검사 실시(전기안전공사에서 실시, 합격) : 2014. 05. 02.

▸배수펌프 및 배수문 가동 시운전	: 2014. 06. 10.

▸집중호우에 따른 배수펌프장 가동(2일)	: 2014. 08. 18./08. 25.

□ 마무리 대책

◦ 재난상황별 비상근무 실시

▸재난상황에 맞는 단계별 비상근무 실시

◦ 재난발생에 따른 재난현장 통합지휘소 설치·운영

▸재난 발생 시 통합지휘소 설치․운영

◦ 배수펌프장 및 배수문 유지관리

▸배수펌프장 및 배수문 지속적인 유지관리 시행(연중)

▸호우에 따른 배수펌프장 상황대기 및 가동(6월~10월)

▸목천 배수펌프장 노후 배수펌프 교체(4대) :  2014. 11. ~ 2015. 03.

3		배수펌프장 이중화 선로 구축사업

	집중 호우시 변전소 정전으로 인하여 배수펌프장 전원이 공급되지 않을 경우 예비전원 확보를 위해 이중화선로를 구축하여 비상시 대처

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  :  익산시 석탄동 및 목천동 일원(유천/목천 배수펌프장)

◦ 사업기간  :  2014. 01. ~ 2014. 12.

◦ 사 업 비  :  500백만원(도비 250, 시비 250)

◦ 사업내용

▸이중화 선로 구성 : 이리변전소 및 영등변전소

▸ALTS(자동부하전환개폐기) 2면 설치 및 TR(변압기) 2대 교체

▸특고압 케이블 교체 외 부대시설

□ 추 진 실 적

◦ 실시설계 용역	:  2014. 01. 28. ~ 03. 03.

◦ 전기사용신청(한국전력공사)	:  2014. 03. 04.

◦ 공사계약 심사	:  2014. 03. 13. ~ 03. 24.

◦ 공 사 착 공	:  2014. 05. 02.

▸배관작업 및 전주설치, 변압기 및 수배전반 제작(공정율 50%)

◦ 한전불입금 납부(한국전력공사)	:  2014. 07.

□ 마무리 대책

◦ 공 사 추 진	:  2014. 11.

▸변압기 교체 및 수배전반 설치

◦ 공 사 준 공	:  2014. 11. 27.

▸전기 사용전 검사(한국전기안전공사)

◦ 용 역 준 공	:  2014. 12. 11.

4		재해 위험지구 정비사업

	함열천 외수위 상승과 배수로 단면 부족에 따른 함열읍 시가지 주택 및 농경지 침수 예방으로 시민의 생명과 재산 보호

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  :  익산시 함열읍 와리 일원

◦ 사업기간  :  2012년 ~ 2015년(4년간)

◦ 사 업 비(2014년 예산)

▸와리 재해위험지구 : 2,478백만원(국비 1,239, 도비 496, 시비 743)

▸삼양 재해위험지구 : 1,200백만원(국비   600, 도비 240, 시비 360)

◦ 사업개요

사 업 명	사 업 내 용	총 사 업 비				사업기간	비고
		계	국비	도비	시비
계		13,388	7,244	2,678	3,466	2012~2015
와리지구	배수로정비 L=2.1㎞	7,978	4,539	1,596	1,843	2012~2015	계속
삼양지구	배수로정비 L=1.5㎞	5,410	2,705	1,082	1,623	2014~2015	신규

□ 추 진 실 적

【 계속지구 : 와리지구 】

◦ 공사 착공	: 2014. 06.

▸토지매입 완료(31필지, 7,609㎡)

▸공 정 율 (85%)

【 신규지구 : 삼양지구 】

◦ 기 본 및 실 시 설 계 (공정율 80%)	: 2014. 04. ~ 10.

▸현황 측량 및 철도시설공단 협의

▸소방방재청 설계 심의 준비

□ 마무리 대책

【 계속지구 : 와리지구 】

◦ 준공 및 마무리 : 2014. 12.

【 신규지구 : 삼양지구 】

◦ 설계심의(소방방재청)	:  2014. 10.

◦ 설계심의(익 산 시)	:  2014. 10.

◦ 원가심의(전라북도)	:  2014. 11.

◦ 토지 및 지장물 보상	:  2014. 10. ~ 2015. 12.

◦ 사 업 착 공 및 준공	:  2014. 12. ~ 2015. 12.

5		모현지구 우수저류시설 설치사업

	집중호우 시 내수배제 불량에 따른 상습침수 발생지역인 모현동주민센터 부근에 우수저류시설을 설치하여 침수피해 예방

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  :  익산시 모현동 1가 180번지 일원

◦ 사업기간  :  2014년 ~ 2016년 (3년간)

◦ 총사업비  :  16,523백만원(국비 8,262, 도비 2,478, 시비 5,783)

▸2014년 예산 :  3,000백만원(국비 1,500, 도비 450, 시비 1,050)

◦ 사업내용  :  우수저류시설 1개소 (15,000㎥)

□ 추 진 실 적

◦ 2014년 대상지 확정(국비 1,500백만원 예산확보)	: 2013. 10.

◦ 기본 및 실시설계 용역 발주 및 착수	: 2014. 04.

◦ 주민설명회 개최(모현동사무소)	: 2014. 05.

▸토지 매입 등 사업추진 적극 협조 요청

◦ 모현 우수저류시설 기본설계 심의(소방방재청)	: 2014. 07.

◦ 모현 우수저류시설 실시설계 심의(소방방재청)	: 2014. 09.

◦ 모현 우수저류시설 도시관리계획 결정 신청	: 2014. 09.

□ 마무리 대책

◦ 도시계획 시설결정 및 실시설계	인가	: 2014. 10. ~ 12.

▸토지 매입 병행 시행 (25필지 4,614㎡)

◦ 공사 발주	:  2015. 01.

◦ 공사 시행	:  2015. 01. ~ 2016. 12.(2년간)

▸2015년 ~ 2016년 연차적으로 국비확보 추진

6		CCTV 통합관제센터 운영

	방범 CCTV 설치 및 24시간 통합관제센터 운영으로 각종 범죄로부터 신속한 대응 체계를 구축하여 시민의 생명과 재산 보호

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  :  무왕로 2길 414(모현동 2가 401-4, 교통정보센터 1층)

◦ 사업기간  :  2014. 01. ~ 12.

◦ 사 업 비  :  1,596백만원(국 270, 도 104, 시 1,222)

◦ 사업내용

▸용도별 CCTV 설치 : 124개소, 1,339백만원(국 270, 도비 104, 시비 965)

- 방범용 12개소, 차량번호판독용 4개소, 아동용 7개소, 어린이보호구역 20개소

- 마을용 14개 읍․면․동 81개 마을

▸CCTV 통합관제센터 24시간 모니터링 민간위탁	: 157백만원(시비)

▸CCTV 통합관제센터 유지 보수 관리	: 100백만원(시비)

□ 추 진 실 적

◦ 용도별 CCTV 설치(44개소 117대 설치)  :  2014. 03. ~ 2014. 09.

▸방범용 8개소 13대 설치

▸차량번호판독용 4개소 8대 설치

▸아동용 7개소 14대 설치

▸마을용 4개 읍․면․동 25개 마을 82대 설치

◦ 익산시 CCTV 설치 및 통합관제센터 운영 규정 제정  :  2014. 03. 28.

◦ CCTV 통합관제센터 24시간 모니터링 민간위탁 의회 동의 : 2014. 03. 28.

◦ 24시간 모니터링 민간위탁 운영	:   2014. 05. 12. ~

▸운영인원 : 12명, 3조 2교대(모니터링 업체 9명, 사회복무요원 3명)

▸계약기간 : 2014. 05. ~ 2016. 01.(1년 9개월간)

▸총사업비 : 429백만원

▸위탁업체 : 전라보안공사

□ 마무리 대책

◦ 어린이보호용 CCTV 설치(20개소 60대)	:   2014. 10. ~ 11.

◦ 방범용 CCTV 설치(4개소 8대)	:   2014. 10. ~ 11.

◦ 10개 읍면동 방범용 CCTV 설치(56개마을)	:   2014. 10. ~ 11.

2015 신규시책

	□	재난안전교육확대로 생활안전도시 구축

		재난안전교육확대로 생활안전도시 구축

□ 필  요  성

◦ 일상생활에서 뜻하지 않게 일어날 수 있는 생활안전 사고에 신속하게 대처할 수 있도록 아파트 관리소장 및 사무원을 대상으로 재난 안전교육을 확대 실시하여 생활안전 도시기반을 구축하고자 함.

□ 현      황

◦ 2014년 방재교육실적

▸기간/대상 : 2014. 01. ~ 12./ 통․리 민방위대장 및 민방위 대원

▸장소/교육인원 : 중앙민방위방재교육원(충남천안)/16명

◦ 공동주택(아파트)현황

(2014. 09. 현재)

합 계	500세대 이 상	400세대 이 상	300세대 이 상	300세대 이 하	비 고
188개소	49개소	23개소	14개소	102개소

※ 연립주택은 제외

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간  :  2015. 01. ~ 12.

◦ 사 업 비  :  4,000천원

▸교육비 160,000원×25명 = 4,000,000원

◦ 대    상  :  공동주택 관리소장 및 사무원

◦ 교육내용(1박2일)

▸실전대비 체험실습(화재, 지진, 태풍, 호우, 각종 안전사고 등)

▸안보현장 견학

▸한반도의 안보 현실과 북한의 실상 등

◦ 교육기관  :  중앙민방위 방재교육원(안전센터)

※ 연도별 투자계획                                      (단위 : 백만원)

구 분	계	2015	2016	2017	2018	2019이후
계	20	4	4	4	4	4
도 비
시군비	20	4	4	4	4	4
기 타

□ 추 진 계 획

◦ 교육협의(중앙민방위 방재교육원)	:  2015. 01.

◦ 안전교육 추진계획 설명(공동주택 관리소장)	:  2015. 01.

◦ 교육 신청(500세대이상 관리소장 및 사무원)	:  2015. 02.

▸대한주택관리사협회 익산지부에 신청

◦ 교육 실시	:  2014. 02. ~ 12.

※ 연차별 추진계획

◦ 500세대 이상(49개소)	:  2015년 ~ 2016년

◦ 400세대 이상(23개소)	:  2017년

◦ 300세대 이상 및 이하(116개소)	:  2018년 ~

□ 기 대 효 과

◦ 공동주택관리소장(사무원)을 순차적으로 교육에 참여시켜 빈번하게 발생하는 안전사고에 신속한 대처능력 강화

◦ 생활안전 사고에 대한 사전예방 교육으로 시민의 안정적 일상 도모