2014. 11.

제181회 익산시의회(임시회)

2014 주요업무 결산보고

전략산업국

한류패션지원과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2014 예 산 집 행 실 적
□	2014 성 과 및 반 성
□	2014 주 요 업 무 결 산

비전 및 중점추진방향

	비 전
한류패션산업을 선도하는 명품도시 익산

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	패션주얼리산업 고부가가치화 귀금속보석산업 성장과 발전 한류패션문화산업 육성과 발전

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	U턴 패션주얼리기업 유치 확대 및 조기정착 지원 귀금속보석 및 주얼리산업의 집적화를 위한 클러스터 (유통, 마케팅, 전시, 판매, 관광) 구축으로 경쟁력 강화 새로운 추가 업종(토탈패션 등) 유턴업체 발굴 및 유치

일  반  현  황

□ 기       구

															한류패션지원과
한류패션정책																									한류패션조성

□ 정 ․ 현 원

(단위:명)

구 분	계	직 급 별								비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능	계약
정 원	9		1	3	3	2
현 원	10		1	4	5	0
증 감	1		0	1	2	△2

□ 사 무 분 장

◦ 한류패션정책  :  한류유턴기업 발굴 및 보석산업 육성

▸ 한류유턴기업 지원정책 개발

▸ 귀금속보석산업 고도화사업 추진

▸ 왕궁 가공단지 및 영등동 귀금속 1,2단지 지원

▸ 주얼팰리스 운영 및 보석축제 지원

◦ 한류패션조성  :  한류유턴기업 유치 및 지원

▸ 주얼리 유턴기업 조기정착 및 인력지원

▸ 패션주얼리 공동연구개발센터 건립 및 운영

▸ 주얼리 유턴기업 집적산업센터 건립

2014 예산집행실적

【 2014. 9. 30 현재 】                                        (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율(%)	비고
한 류 패 션 지 원 과				32,712,638	11,344,495	21,368,143	34.7
	한류패션산업조성			32,699,976	11,334,998	21,364,978	34.7
		보석산업도약과발전		6,535,776	746,795	5,788,981	11.4
			귀금속보석산업 활성화지원	119,184	60,213	58,971	50.5	명시 10,732
			익산귀금속보석 전시판매센터관리	99,300	99,300	0	100
			귀금속보석산업 고도화육성	5,805,000	528,433	5,276,567	9.1	계속비 2,700,000
			보석테마관광지 주차장조성사업	512,292	58,849	453,443	11.5	사고 512,292
		유턴기업지원		26,164,200	10,588,203	15,575,997	40.5
			중국 주얼리 유턴기업 공동R&D시설 구축	13,442,170	8,645,914	4,796,256	64.3	명시 13,442,170
			한류패션유치및지원	765,470	32,494	732,976	4.2
			쥬얼리유턴기업 인력양성사업	390,000	122,995	267,005	31.5	명시 300,000
			익산패션주얼리 공동R&D센터 운영	621,560	530,215	91,345	85.3
			유턴기업 주얼리 집적산업센터건립	10,945,000	1,256,585	9,688,415	11.5
	행정운영경비			12,662	9,497	3,165	75.0
		기본경비		12,662	9,497	3,165	75.0
			기본경비	12,662	9,497	3,165	75.0

2014 성과 및 반성

□ 성      과

◦ U턴기업 유치활동 전개

▸ 선도기업 생산공장 착공 및 준공(가동) : 9개기업

▸ 투자유치활동 : 200여업체(중국, 일본, 베트남 등 해외진출기업)

- 메이저기업 30개, 협력업체 170개

▸ 주얼리 집적산업센터 입주 희망업체 의향서 접수 : 127개기업

◦ U턴기업 지원사업 추진

▸ 익산패션주얼리 공동연구개발센터     : ’14. 7월 완공

▸ 주얼리 집적산업센터                 : 기본 및 실시설계 완료

▸ 주얼리 U턴기업 맞춤인력 양성        : 기능인력 140명 교육실시

◦ 귀금속 보석산업 활성화사업 추진

▸ 귀금속보석산업 고도화육성사업       : 기본 및 실시설계 완료

▸ 왕궁보석테마관광지주차장 조성사업   : 공사중(공정:70%)

◦ 귀금속 보석산업 발전방안 모색 및 지원

▸ 익산귀금속보석산업발전협의회 개최   : 3회

▸ 주얼팰리스 관리, 보석대축제 지원 및 홍보 실시

□ 반      성

◦ U턴 투자협약기업 투자 지연으로 도금장 정상운영 애로

▸ 지속적인 투자 촉구로 활성화 도모

2014 주요업무결산

		U턴기업 유치확대 익산패션주얼리 공동연구개발센터 운영 주얼리 집적산업센터 건립 주얼리 U턴기업 맞춤인력양성 귀금속보석산업 고도화육성사업

1		U턴기업 유치확대

□ 사 업 개 요

◦ 유치목표 : 300개 업체 이상

▸ 1단계(2012 ~ 2013)  - 주얼리전용단지 조성 / 9개 업체 착공

패션주얼리공동연구개발센터 건립

▸ 2단계(2014 ~ 2015)  - 집적산업센터 건립   /  50개 업체 유치

▸ 3단계(2016 이후)   - U턴 전용산단 조성   / 250개 업체 유치

□ 추 진 실 적

◦ U턴기업 유치활동

▸ 해외진출기업 대표자 및 관계자 투자유치활동   : 200여 업체

◦ U턴기업 투자협약 체결                         :  24개 업체

▸ 생산공장 완공 등 – 9개 업체

◦ 주얼리집적산업센터 입주 희망 의향서 접수      : 127개 업체

◦ 미국 빅바이어 국내복귀기업 MOU체결(1회)

□ 마무리대책

◦ 중국진출 주얼리기업 지속적 유치활동 전개	: 2014. 10. ~

◦ 일본, 동남아 등 유치활동지역 다변화

▸ 베트남 진출 기업 여건 악화에 따른 반대급부적 상황 활용

▸ 일본진출기업 연계 주얼리제품 판매 등 다각적 협력방안 모색

◦ 국내복귀기업의 성공적인 정착을 위해 빅바이어 연계 방안 모색

◦ U턴 포기기업에 대한 지방투자촉진보조금 등 환수(5,542백만원)  : 2014. 12월한

2		익산 패션주얼리 공동연구개발센터 운영

□ 사 업 개 요

[ 시설현황 ]

◦ 위    치 : 낭산면 산단구평길 102-35 (익산제3일반산업단지 주얼리공단 내)

◦ 사업규모 : 부지면적 13,441.9㎡, 건물면적 5,466.38㎡

▸ 연구시설 - 습식도금, 이온도금, 금형․다이케스팅, 실험실

▸ 지원시설 - 사무실, 디자인연구실, 세미나실, 취업지도실 등

◦ 사 업 비 : 18,166백만원 (국비 11,700 도비 4,330 시비 2,136)

◦ 공사기간 : 2013. 7. 23. ~ 2014. 7. 23.

[ 운영현황 ]

◦ 운영방법 : 민간위탁(한국주얼리 협동조합)

▸ 위탁기간 : 2014. 5. 1. ~ 2017. 4. 30. (3년)

▸ 위 탁 비 : 621백만원(시비, 2014년)

□ 추 진 실 적

◦ 공사착공	: 2013.  7. 23.

◦ 시의회 민간위탁 동의	: 2014.  2. 21.

◦ 민간위탁 협약체결(한국주얼리협동조합)	: 2014.  4. 25.

◦ 민간위탁 시행	: 2014.   5.   1.

◦ 건물 준공완료(습식도금시설 포함)	: 2014.  7. 23.

◦ 실험 및 연구개발장비 구축(9건, 1,424백만원)            : 2014.  9. 23.

□ 마무리 대책

◦ 습식 도금장비 정상 운영                              : 2014. 11월중

◦ 실험 및 연구개발 장비 구축 완료(23건 2,551백만원)    : 2014. 11월중

3		주얼리 집적산업센터 건립

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 낭산면 구평리 1519번지 (익산제3일반산업단지 주얼리공단 내)

◦ 사 업 비 : 12,290백만원 (국비 5,690, 도비 2,845, 시비 3,755)

◦ 사업기간 : 2014년 ~ 2015년

◦ 사업규모 : 부지 7,340㎡ 건물면적 7,000㎡(지상4층)

◦ 사업내용 : 협력업체, 원·부자재상가 입주공간 및 지원시설 건립을 통한 주얼리 인프라 구축

□ 추 진 실 적

◦ 원․부자재상 및 협력업체 입주의향서 접수    : 127개 업체

◦ 사업수행능력평가                          : 2014.  2.  ~ 2014.  3.

◦ 설계업체선정                              : 2014.  4.

◦ 기본 및 실시설계                          : 2014.  5.  ~ 2014. 10.

□ 마무리 대책

◦ 시공자 및 감리자 선정                     : 2014. 11.  ~ 2014. 12.

◦ 공사기간                                  : 2014. 12.  ~ 2015. 12.

4		주얼리 U턴기업 맞춤인력양성

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 2013. 9. ~ 2014. 12.

◦ 사 업 비 : 300백만원(도비 90, 시비 210)

◦ 교육인원 : 240명(익산시에 주소를 둔 만 18세~49세 미취업자)

▸ 2개월 과정, 3회 교육 실시

◦ 교육기관 : 관내 직업능력 개발 훈련 시설(폴리텍대학Ⅴ대학, 직업전문학교 등)

◦ 교육내용 : 단순 기능사 과정(세공, 금형 등) 인력 양성

◦ 추진체계

구 분	역 할	비고
익 산 시	업체 수요 조사 , 사업비 지원, 취업 지원
교육기관	교육생 모집선발, 교육 과정 개발 및 실시, 교육생 취업 관리
업 체	교육생 우선 채용 및 수요 정보 제공

□ 추 진 실 적

◦ 교육기관 선정 및 홍보                      :  2013.  9. ~ 2013. 11.

◦ 기능인력 교육 실시                         :  2013. 12. ~ 2014.  9.

▸ 인 원 : 140명(폴리텍 48, 성심 62, 애림 30)

□ 마무리 대책

◦ 기능인력 교육 실시                         : 2014. 10. ~ 2014. 12.

◦ 교육기관 지도 점검                          : 수시

◦ 교육수료 후 취업연계 지원                   : 2014. 12.

◦ 결과보고 및 정산                           : 2014. 12.

5		귀금속보석산업 고도화육성사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 왕궁면 동용리 보석가공단지 내

◦ 사업기간 : 2012년 ~ 2016년 (5년)

◦ 사 업 비 : 19,300백만원(국비 13,700,  시비 5,600)

◦ 사업규모 : 부지 12,734㎡, 연면적 8,600㎡

◦ 사업내용 : 아파트형 표준공장 및 디자인․기술지원센터 건립

◦ 연도별 사업비내역

(단위 : 백만원)

구 분	계	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
합 계	19,300	1,700	1,000	3,105	6,600	6,895
국 비	13,700	1,000	500	1,705	5,200	5,295
시 비	5,600	700	500	1,400	1,400	1,600

□ 추 진 실 적

◦ 기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수	: 2014. 1.

◦ 기본 및 실시설계 용역	: 2014. 2. ~ 2014. 7.

◦ 원가심사 등 행정절차 이행	: 2014. 8. ~ 2014. 9.

□ 마무리 대책

◦ 아파트형 공장 및 디자인기술지원센터 건립     : 2014. 11. ~ 2016. 6.

◦ 디자인기술지원센터 장비구입	: 2015. 10. ~ 2016. 6.