2014. 11.

제181회 익산시의회(임시회)

2014 주요업무 결산보고

환경녹지국

도시공원과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2014 예 산 집 행 실 적
□	2014 성 과 및 반 성
□	2014 주 요 업 무 결 산

비전과 중점추진방향

	비 전
자연 생태적 녹색환경 도시 조성

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	시민체감형 문화․여가 공간 확충 자연 친화적 녹색도시 조성 쾌적한 공원․녹지 환경 조성

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	푸른 숲과 꽃이 어우러진 아름다운 녹색공간 조성 시민의 삶의 질 향상을 위한 생태 휴식공간 조성 시민 중심 공원 정비로 편리하고 안전한 공원환경 조성

일  반  현  황

□ 기       구

				도시공원과
푸른숲조성			조 경				공 원 조 성			공 원 관 리

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별								비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능	계약
정 원	16		1	4	2	5	4
현 원	16		1	6	5	3	1
증 감				2	3	△2	△3

□ 사 무 분 장

◦ 푸른숲조성 : 도시숲 조성, 가로수 및 가로화단 조성, 학교공원화 사업,

쌈지공원조성, 수목 양묘장 관리

◦ 조       경  : 초화류 재배 및 식재, 꽃길조성 관리, 주요도로변 특화거리 조성,  꽃묘 양묘장 관리

◦ 공 원 조 성 : 공원조성, 공원녹지조성사업, 공원리모델링사업

◦ 공 원 관 리 : 공원시설물 설치 및 유지관리, 공원 수목식재 및 유지 관리

(전지, 방제, 예취, 풀메기)

2014 예산집행실적

【 2014. 9. 30. 현재 】                                  (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
도시공원과				5,241,797	3,802,755	1,439,042	72.5
	녹색도시조성			5,150,291	3,725,705	1,424,586	72.3
		도시림 조성		925,794	777,412	148,382	84
			도시숲 조성	200,000	177,031	22,969	88.5
			도시숲 유지관리 (자체)	35,794	31,362	4,432	87.6
			녹색자금지원사업	690,000	569,019	120,981	82.5
		가로수 조성 및 관리		345,397	277,131	68,266	80.2
			가로수 조성	200,000	145,032	54,968	72.5
			가로수 유지관리 (자체)	127,670	114,372	13,298	89.6
			수목양묘장 조성 및 관리	17,727	17,727	0	100
		공원조성		1,750,000	870,619	879,381	49.7
			소라산공원 조성사업	1,250,000	849,799	400,201	68	이월 예산 포함
			신용공원 조성사업	500,000	20,820	479,180	4.2	이월 예산 포함
		공원녹지관리		1,609,493	1,402,878	206,615	87.2
			공원녹지시설 유지관리	1,099,738	991,653	108,085	90.2	이월 예산 포함
			공원녹지 수목 유지관리	509,755	411,225	98,530	80.7

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
		가로화단 경관조성		519,607	397,665	121,942	76.5
			가로화단 조성 및 관리	170,425	145,860	24,565	85.6
			꽃양묘장 관리 및 꽃 조성	186,952	136,179	50,773	72.8
			푸른익산가꾸기 운동본부지원	45,480	45,480	0	100
			중앙분리대 수목관리	18,241	3,844	14,397	21.1
			산림서비스 도우미	42,009	32,519	9,490	77.4
			학교공원화 및 담장없애기 사업	56,500	33,783	22,717	59.8
	가로수 재해방지			51,518	43,690	7,828	84.8
		도로변 병해충방제		51,518	43,690	7,828	84.8
			병해충 방제 물품	27,423	22,879	4,544	83.4
			병해충 방제(자체)	18,000	15,531	2,469	86.3
			병해충 방제	6,095	5,280	815	86.6
	행정운영경비			39,977	33,349	6,628	83.4
		기본경비		39,977	33,349	6,628	83.4
			기본경비	39,977	33,349	6,628	83.4
	재무활동			11	11	0	100
		보전지출		11	11	0	100
			보전지출	11	11	0	100

2014 주요성과

□ 성      과

◦ 시민들에게 휴식 공간 및 생태 교육 공간 제공

▸도시숲 조성사업(함열역 주변)

- 200백만원(광특 100, 시비 100)

▸가로수 식재(여산면 741 지방도 외 1)

- 200백만원(광특 100, 시비 100)

▸녹색공간 및 나눔숲 조성사업

(사회복지시설, 전북대학교 익산캠퍼스 실습장, 전북혜화학교)

- 690백만원(공모사업)

◦ 도심지 꽃 거리 조성으로 자연친화적 도시경관 연출

▸계절별 꽃 식재 : 메리골드 외 15종 550,000본(시 직영재배)

▸특색 있는 식물로 조경 : 황금사철, 헤데라 등 8종 12,000본

▸서동축제 및 평생학습축제 등 꽃 지원 : 메리골드 외 3종 약 30,000본 지원

▸중앙동 특화 꽃 거리 조성 : 꽃걸이, 사각화분, 원형화분 등 조경

◦ 소라산(자연마당) 조성사업

▸생태환경 및 다양한 생물서식지 복원 기반 마련

- 11,362백만원(국비 3,000, 시비 8,362)

◦ 쾌적하고 안전한 공원환경 조성

▸공원 파손 및 노후 시설물 등 정비 : 한솔공원 외 40개소

▸수목 보식 및 야생화 식재 : 남중공원 외 13개소

- 수목(느티나무 외 5종 5,142본), 야생화(금계국 외 1종 35,000본)

▸태풍피해 예방 전지작업 : 제1공단 녹지 외 3개소

2014주요업무결산

		도시숲 조성 및 관리 녹색나눔숲 조성사업 녹색공간 조성사업 자연친화 감성 꽃거리 조성사업 소라산 공원(자연마당) 조성 사업 신용 쉼터 조성 사업 도시공원 및 녹지 관리

1		도시숲 조성 및 관리

□ 사 업 개 요

◦ 위    치

▸도 시 숲 조 성	:  함열역 주변 1개소(산림청 역사(驛舍)의 숲 조성계획)

▸가 로 수 조 성	:  여산면 741 지방도 등 2개노선 3km

▸가로수 유지관리 :  하나로 등 120개 노선 340km

◦ 사   업   비	:  528백만원(광특 200, 시비 328)

▸도시숲 조성	:  200백만원(광특 100, 시비 100)

▸가로수 조성	:  200백만원(광특 100, 시비 100)

▸가로수 유지관리 :  128백만원(시비)

□ 추 진 실 적

◦ 도시숲 조성사업

▸함열역 주변 1개소 완료(느티나무외 8종 2천본, 휴게공간조성 등)

◦ 가로수 조성사업

▸여산면 741 지방도(도계경계~여산면 소재지), 인화동 목천로

가로수 식재공사 완료(L=4.3km)

◦ 가로수 유지관리

▸하나로 무왕로 등 주요노선 전지작업 추진

▸관내 가로수 수형조절 및 부정아 제거, 병해충 방제 등

□ 마무리 대책

◦ 가로수 유지관리	: 2014. 10. ~ 12.

▸가로수 수형조절 등 전지작업

▸가로수 비료주기 등 생육환경개선

2		녹색 나눔숲 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  :  마동 224-1번지 일원(전북대 익산캠퍼스 실습장)

◦ 사업내용  :  수목식재 산딸나무외 27종 10천본, 한방체험숲길 가시오가피외 9종 13천본, 황토포장 400m, 담장없애기 214m, 창고철거 3동, 조경석 쌓기 69m, CCTV 4대, 공원등 4개 설치

◦ 사 업 비  :  400백만원(국비 - 산림청 공모사업 선정)

□ 추 진 실 적

◦ 녹색나눔숲 조성사업 전북대(익산캠퍼스)와 협의	: 3회

◦ 녹색 나눔숲 조성사업 실시설계 용역 완료	: 2014. 3.  7.

◦ 녹색사업단 설계서 사전심사 완료	: 2014. 4. 22.

◦ 여성친화컨설팅 및 경관디자인 자문 완료	: 2014. 5. 21.

◦ 설계심의, 계약심사 완료	: 2014. 6. 30.

◦ 사업추진(담장없애기, 창고 철거 등)	: 2014. 8. ~ 9.

□ 마무리 대책

◦ 공사추진 및 준공	: 2014. 10. ~ 11.

3		녹색공간 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  :  이리자선원, 동그라미재활원, 전북혜화학교

◦ 사업기간  :  2014. 2 ~ 11월

◦ 사업내용  :  수목식재 공작단풍외 26종 10천본, 산책로 조성,

콘크리트 철거, 퍼걸러, 벤치 설치 등

◦ 사 업 비  :  290백만원(도비 - 산림청 공모사업 선정)

□ 추 진 실 적

◦ 이리자선원, 동그라미재활원과 협의	: 3회

◦ 녹색공간조성사업 실시설계 용역 완료	: 2014.  3.  7.

◦ 녹색사업단 설계서 사전심사 완료	: 2014.  3. 25.

◦ 여성친화컨설팅 및 경관디자인 자문 완료	: 2014.  4. 11.

◦ 계약심사 완료	: 2014.  4. 16.

◦ 이리자선원, 동그라미재활원 사업 완료

▸콘크리트 철거, 수목식재, 황토포장 등	: 2014.  4. ~ 6.

◦ 전북혜화학교 사업 착공 및 사업추진	: 2014. 10.

□ 마무리 대책

◦ 전북혜화학교 사업 추진 및 준공	: 2014. 11.

▸수목식재(편백나무외 10종 857본), 산책로 조성 등

4		자연친화 감성 꽃거리 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2014. 1 ~ 12월

◦ 사업내용 : 주요도로변 가로화단 및 교통섬 등 꽃 식재

◦ 사 업 비 : 264백만원

□ 추 진 실 적

◦ 주요도로변  꽃 식재로 쾌적한 도심 환경 조성

▸꽃    종 : 메리골드 외 15종

▸식 재 량 : 550,000본

▸식재위치

- 교  통  섬 : 배산사거리 교통섬 외 23개소 1,282㎡

- 가 로 화단 : 남북로 외 4개소 1,283㎡

- 꽃  박  스 : 시청광장 외 주요도로변 17개소(256개)

- 가로수하부 : 선화로 외 주요가로변 7개소

- 꽃  걸  이 : 시청주변외 4개소(132개)

◦ 서동축제 및 평생학습축제 등 꽃 지원

▸행사장 입구 및 광장등에 메리골드외 3종 약 30,000본 지원

◦ 중앙동 특화 꽃 거리 추진으로 아름다운 거리 조성

▸가로등주 꽃걸이 설치(41개소), 역앞길 상가 쇼원도 앞 사각화분 설치 (50여개 점포)

□ 마무리대책

◦ 동절기 가로변 감성 꽃거리 지속적인 관리	: 2014. 11. ~ 12.

▸보식작업, 물주기 등으로 계속적인 관리

◦ 2015년 봄꽃식재 꽃씨파종 및 관리	: 2014. 11. ~ 12.

▸펜지, 비올라, 튤립 등 봄꽃파종 및 폿트작업

5		소라산 공원(자연마당) 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  :  영등동 산140 번지(소라산 일원)

◦ 사업기간  :  2008. 10월 ~ 2015. 12월

▸사업시행 :  환경부(시공사 ㈜송림에코원)

◦ 사업규모  :  생태공원 42,254㎡

◦ 사업내용  :  자연생태숲, 산책로, 생태 늪, 체험관 등

◦ 사 업 비  :  11,362백만원 (시비 8,362  국비 3,000)

▸2013년 까지 투자액 : 5,822백만원(토지 및 지장물 보상비)

▸2014년도 확보 예산 : 1,170백만원

□ 추 진 실 적

◦ 문화재 시굴조사	: 2013. 12. ~ 2014. 2.

◦ 공원조성계획 변경 결정	: 2014.  7.

◦ 편입토지매입	: 2014.  1. ~ 9.

▸전체 42,254㎡ 중 37,093㎡, 88% 매입

□ 마무리 대책

◦ 실시계획인가	: 2014. 10.

◦ 공사추진	: 2014. 11. ~ 2015. 12.

▸매입토지에 한해 공사 우선 추진, 잔여토지 매입 병행

6		신용쉼터 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  :  신용동 547번지 일원

◦ 사업기간  :  2014. 1 ~ 12월

◦ 사업규모  :  10,000㎡정도

◦ 사업내용  :  산책로, 휴식공간, 수목식재 등

◦ 사 업 비  :  500백만원(특별교부세)

□ 추 진 실 적

◦ 실시설계	: 2014. 3. ~ 5.

◦ 신용쉼터 조성사업 협약	: 2014. 4.

▸토지사용 승낙(원불교, 원창영농조합)

◦ 설계 심의	: 2014. 8.

◦ 계약 심사	: 2014. 9.

□ 마무리 대책

◦ 공사 추진	: 2014. 10. ~ 12.

7		도시공원 및 녹지 관리

□ 사 업 개 요

◦ 대    상 : 공원 95개소 555ha, 녹지 76개소 90ha

◦ 사업기간 : 2014. 1 ~ 12월(연중)

◦ 사업내용 : 시민 누구나 안전하고 편안하게 이용할 수 있는 공원시설

정비 및 수목 관리

◦ 사 업 비 : 1,410백만원(시설관리 900, 수목관리 510)

□ 추 진 실 적

◦ 공원 시설물 정비 및 환경정비

▸노후 파손 시설물 수시 정비 : 한솔공원 외 40개소(110건)

▸공원·녹지 전기시설 보수 : 어양공원 외 10개소(18건)

▸야간 조도 개선 : 용안 무학공원 외 33개소, 120등 교체

(삼파장램프 100W → LED등 50W)

▸환경정비 : 공원·녹지 117개소(화장실 48개소) - 청소인력 7명 사역

◦ 수목 및 야생화 식재

▸위치 : 남중공원 외 13개소

▸식재 : 수목(느티나무 외 5종 5,142본), 야생화(금계국 외 1종 35,000본)

◦ 공원 수목관리

▸병해충 방제 : 5회 실시(117개소)

▸소나무 전정작업 : 영등근린공원 외 15개소(1,000본)

▸가지치기 및 고사지 정리 : 수시(95개소)

▸가지치기를 통해 공원내 폐쇄공간 개방(범죄 예방)

- 수목 울타리 키낮춤 전정(13개소)

▸태풍피해 예방 전지작업 : 제1공단 녹지 외 3개소

(플라타너스 외 12종, 84본)

◦ 잔디 관리 및 덩굴제거

▸예취, 풀매기, 덩굴제거 : 수시(117개소)

□ 마무리 대책

◦ 파손시설물 등의 신속한 정비 추진	: 2014. 11. ~ 12.

◦ 수목의 건강한 생육촉진(전지, 고사지 정리 등)	: 2014. 11. ~ 12.