2015. 1.

제183회 익산시의회(임시회)

2015 주요업무계획

	안전행정국

안전총괄과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2014 주 요 성 과
□	2015 주 요 업 무 계 획
□	특 수 시 책

비전 및 중점추진방향

	비 전
시민이 느낄 수 있는 안전한 도시 익산 건설

		전 략 목 표
	재난예방 활동 강화 및 재난 발생시 신속한 복구로 시민의 재산과 인명피해를 최소화

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦ ◦	예방중심의 재난안전관리 강화로 생활안전 확보 재난발생요인 사전파악 및 안전조치로 선제적 재난 사전예방 급변하는 안보상황에 맞춘 비상대비 업무수행으로 시민의 안전 확보 풍수해 사전대비 및 예방활동 전개로 인명과 재산피해 최소화 CCTV 운영을 통한 시민중심의 안전망 구축

일   반   현   황

□ 기       구

				안전총괄과
안 전 총 괄			안 전 관 리				민 방 위			재 난 방 재

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별							비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	계약
정 원	18		1	4	7	0	6
현 원	19		1	6	8	3	1		청경 2 무기 1
증 감	1			2	1	3	△5

□ 업 무 분 장

담 당	업 무 분 장 사 항
안전총괄	안전 총괄업무 관리, 재난안전 관리정책 총괄 조정, 지역재난대책본부 및 재난현장통합지휘소 운영【사회재난(국가기반, 감염, 전염병 관련)】, 안전문화운동 추진, 익산시 자율방재단 관리, 유도선 및 수상레저, CCTV설치, CCTV 통합관제센터 운영, 재난관리기금 운영, 안전도시 만들기
안전관리	재난현장통합지휘소 운영【자연, 사회재난 (인적)】, 지역단위 재난예방 및 안전관리계획 수립, 대형사고 예방 및 시설물 안전진단, 안전교육, 특정 관리대상 시설물 안전관리, 배수장 관리, 국가재난관리 정비시스템 운영(NDMS), 재난안전상황실 운영, 재난 상황 대응계획 수립 운영(가뭄. 폭염 대책수립 등)
민 방 위	국가 비상대비 훈련 추진, 통합방위협의회 및 방위지원본부 운영, 충무계획 수립, 비상시 인적․물적 동원 자원관리, 주민 신고망 운영, 민방위 기본계획 수립, 민방위대원 교육훈련 실시, 민방위 비상시설 점검관리, 사회복무요원 관리
재난방재	풍수해 상황 접수 및 피해 긴급 복구, 풍수해예방 및 복구공사 설계․감독, 재해 및 피해상황 전문 조사반 운영, 재해위험지구지정 및 정비사업 추진, 익산시 풍수해 종합계획수립 운영, 붕괴위험지역 지정 및 관리

□ 특정관리대상시설 현황

(단위 : 개소)

구 분	관리대상 시 설 물	중점 관리대상				재난 위험시설
		계	A	B급	C급	계	D급	E급
합 계	854	852	172	646	34	2	2
시 설 물	58	57	3	27	27	1	1
건 축 물	796	795	169	619	7	1	1

□ 자연재해 저감시설 현황

(단위 : 개소)

구 분	계	하 천	배수펌프장	수 문	저수지	육교․교량
계	332	89	12	10	111	110

□ 민방위 시설장비 현황

시설명	경 보 사이렌	대피시설		비상급수		장비확보상황
		정부지원	민간․공공	정부지원	공공용 시설	일 반	방독면
개 소	12개소	2개소	84개소	6개소	45개소	1,158점	11,688점

□ CCTV 설치 현황(CCTV 통합관제센터 관리)

구 분	설 치 대 수
	총 계	방 범 용	차량번호 판 독 용	아동용	어 린 이 보호구역
개 소	266	95	27	61	83
대 수	647	179	54	110	304

※ 마을 자체관리(방범용) : 282대

□ 위원회 현황

계	안전 관리 위원회	재난관리기금 운용심의위원회	사전재해영향성검토 위원회	비 고
3개/ 47명	17명	9명	21명
	▸위원장 : 익산시장 ▸위 원 : 관련부서 및 유관 기관(16명)	▸위 원 장 : 부시장 ▸부위원장 : 안전행정국장 ▸위 원 : 해당부서장, 교수 등(7명)	▸위원장 : 안전행정국장 ▸위 원 : 시의원, 교수 등 (20명)	□익산시 안문협(30명) □익산시 지역자율방재단(156명) □통합방위협의회(10명)

2014 주 요 성 과

□ 성      과

◦ 재난대비 안전점검 및 맞춤형 안전문화 교육 실시

▸안전점검의 날 운영(매월 4일) : 12회/1,020명 참여, 안전 홍보물 50,000매 배부

▸맞춤형 안전문화교육실시

- 26개 초․중･고등학교, 3,800명/교통안전 및 생활안전 교육 등

◦ 재난안전 사고발생에 따른 긴급 안전점검 실시

▸경주 마우나 리조트 붕괴사고 관련 해빙기대비 취약시설 점검

- 기간/대상 : 2014. 02. 15. ~ 03. 30. / 다중이용시설 70개소, 해빙기취약시설 11개소

▸세월호 침몰사고 관련 특정관리대상 긴급 안전점검

- 기간/대상 : 2014. 04. 29. ~  05. 22. / 다중이용시설 886개소(교량, 공공청사 등)

▸장성요양병원 화재사고 관련 요양시설 긴급 안전점검

- 기간/대상 : 2014. 05. 29. ~ 06. 12. / 요양병원, 노인･장애인 복지시설 90개소

◦ 국가비상대비 훈련 및 민방위대원 교육 실시

▸’14 FE연습 : 2014. 04. 07. ~ 04. 11. / 2,860명

▸민방위대원 교육 : 2014. 4월, 10월, 12월.(3회) / 7,213명

▸’14 을지연습 : 2014. 08. 18. ~ 08. 21. / 민․관․군･경 2,650명

◦ 침수피해 대비 재해위험지구 정비사업 추진

▸익산1지구 우수저류시설 설치사업(2014. 06. 30. 준공)

▸모현 지구 우수저류시설 설치사업(기본 및 실시설계 용역 90%)

▸재해위험지구 조성사업 추진

- 와리 : 2014. 12. 31. 준공, 삼양 : 기본 및 실시설계 용역 90%

◦ CCTV 통합관제 센터 운영으로 시민의 생명과 재산 보호

▸24시간 CCTV 모니터링 추진	: 2014. 05. 12.

▸용도별 CCTV 설치 완료	: 405대

- 통합관제센터 관리 : 123대(방범용 39대, 아동용 14대, 차량판독용 10대, 어린이보호구역 60대)

- 마을자체관리    : 282대

2015 주요업무계획

		목천 배수펌프장 노후펌프 교체 삼양재해위험지구 정비사업 모현지구 우수저류시설 설치사업 급경사지 붕괴 위험지역 정비사업 용도별 CCTV 설치 및 통합관제센터 운영

1		목천 배수펌프장 노후펌프 교체

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  :  익산시 만경강길 55(목천배수펌프장내)

◦ 사업기간  :  2015. 01. ~ 2015. 04

◦ 사 업 비  :  900백만원(특별교부세)

◦ 사업내용  :  노후 펌프 교체 - 4대

▸펌프 총 5대중 2015년 4대 교체 예정(2013년 1대 교체 완료)

□ 추 진 계 획

◦ 교체공사 계약 및 착공	:  2015. 01.

◦ 펌프 제작 도면 검토 및 승인	:  2015. 02.

◦ 펌프 제작 및 설치	:  2015. 02. ~ 04.

◦ 펌프 시운전 및 준공	:  2015. 04.

□ 기 대 효 과

◦ 펌프시설 노후로 각종 고장 등 가동불량에 따라 펌프를 교체하여 집중호우 시 침수예방

2		삼양 재해위험지구 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  :  익산시 함열읍 와리 일원

◦ 사업기간  :  2014년 ~ 2016년(3년간)

◦ 사업내용  :  배수로정비 L=1.5㎞

◦ 총사업비  :  5,410백만원(국비 2,705, 도비 1,082, 시비 1,623)

▸2014년  :  1,200백만원(국비   600, 도비   240, 시비   360)

▸2015년  :  2,200백만원(국비 1,100, 도비   440, 시비   660)

□ 추 진 계 획

◦ 국민안전처(소방본부) 심의	:   2015. 01.

◦ 실시설계 용역 준공	:   2015. 02.

◦ 보상협의 추진(48필지/12,357㎡)	:   2015. 01. ~ 12.

◦ 공사 추진

▸공사 착공	:   2015. 03.

▸공사 준공	:   2016. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 함열천 수위 상승과 배수로 단면 부족으로 배수로 정비 사업을 통해함열읍 시가지 주택 및 농경지 침수 예방

3		모현지구 우수저류시설 설치사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  :  익산시 모현동 1가 180번지 일원

◦ 사업기간  :  2014년 ~ 2016년 (3년간)

◦ 총사업비  :  16,523백만원(국비 8,262, 도비 2,478, 시비 5,783)

▸2014년  :   3,000백만원(국비 1,500, 도비   450, 시비 1,050)

▸2015년  :   9,000백만원(국비 4,500, 도비 1,350, 시비 3,150)

◦ 사업내용  :  우수저류시설 1개소 (15,000㎥)

□ 추 진 계 획

◦ 보상협의 추진(22필지/4,854㎡)	:   2015.  1. ~

◦ 공사원가심사(전라북도)	:   2015.  2.

◦ 책임감리 용역 착공	:   2015.  2.

◦ 공사발주	:   2015.  2.

□ 기 대 효 과

◦ 집중호우 시 내수 배제 불량으로 상습침수 발생 지역인 모현동사무소 부근에 우수저류시설을 설치하여 침수 피해 예방

4		급경사지 붕괴 위험지역 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  :  익산시 모현동 일원, 웅포면 웅포리 일원

◦ 사업기간  :  2014년 ~ 2015년 (2년간)

◦ 총사업비  :  2,500백만원(국비 1,250, 도비 625, 시비 625)

▸2014년  :    400백만원(국비   200, 도비 100, 시비 100)

▸2015년  :  2,100백만원(국비 1,050, 도비 525, 시비 525)

- 모현  :  1,600백만원(국비   800, 도비 400, 시비 400)

- 응포  :    500백만원(국비   250, 도비 125, 시비 125)

◦ 사업내용

▸모현 향기지구(2014년 ~ 2015년)	:  사면정비 A=2,400㎡

▸웅포 13지구  (2015년)	:  사면정비 A=1,600㎡

□ 추 진 계 획

◦ 모현 향기지구

▸토지매입(5필지/1,441㎡)	:  2015. 01. ~ 2015. 02.

▸공사추진	:  2015. 03. ~ 2015. 12.

◦ 웅포 13지구

▸실시설계용역 추진	:  2015. 01. ~ 2015. 02.

▸공사추진	:  2015. 03. ~ 2015. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 집중호우 시 고지대 사면 붕괴 위험을 개선하여 시민의 생명과 재산 보호

5		용도별 CCTV 설치 및 통합관제센터 운영

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  :  무왕로 2길 414(모현동 2가 401-4, 교통정보센터 1층)

◦ 사업기간  :  2015. 01. ~ 12.

◦ 사 업 비  :  2,223백만원(국비 250, 도비 196, 시책추진 872, 시비 905)

◦ 사업내용

▸용도별 CCTV 설치 : 1,865백만원(국비 250 도비 196, 시책추진 872, 시비 547)

계	방 범 용	아 동 용	차량번호판독용	어린이보호구역
39개소/92대	16/30	5/10	2/4	16/48

- 마을방범용 :  16개 읍․면․동

▸CCTV 통합관제센터 24시간 모니터링 용역	: 264백만원

▸CCTV 통합관제센터 유지 보수 용역	:  94백만원

□ 추 진 계 획

◦ CCTV 통합관제센터 24시간 모니터링 용역 실시	:  2015. 01. ~ 2015. 12.

▸운영방법 : 9명, 3조 2교대 근무

◦ CCTV 통합관제센터 유지 보수 용역	:  2015. 01. ~ 2015. 12.

▸유지보수 용역 계약 체결  :  2015. 01.

◦ 용도별 CCTV 설치

▸시청사 및 주변  CCTV 교체(19대)	:  2015. 01. ~ 2015. 02.

▸용도별 CCTV 설치(39개소, 16개 읍․면․동)	:  2015. 03. ~ 2015. 10.

□ 기 대 효 과

◦ 용도별(목적별) CCTV 설치 및 24시간 통합관제센터 운영으로 각종범죄로부터 신속한 대응체계를 구축

특수시책

		생활 안전교육 확대로 안전도시 구축

생활 안전교육 확대로 안전도시 구축

□ 필  요  성

◦ 일상생활에서 뜻하지 않게 일어날 수 있는 생활안전 사고에 신속하게 대처할 수 있도록 아파트 관리소장 및 사무원을 대상으로 재난 안전교육을 확대 실시하여 생활안전 도시기반을 구축하고자 함.

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간  :  2015. 01. ~ 12.

◦ 사 업 비  :  3,000천원(교육비 150,000원 × 20명 = 3,000,000원)

◦ 대    상  :  공동주택 관리소장 및 사무원

◦ 공동주택(아파트)현황                              (2015. 01. 현재)

합 계	500세대 이상	400세대 이상~ 500세대 미만	300세대 이상~ 400세대 미만	300세대 이하	비고
119개소	50개소	23개소	14개소	32개소

◦ 교육내용(1박2일)

▸실전대비 체험실습(화재, 지진, 태풍, 호우, 각종 안전사고 등), 안보현장 견학

▸한반도의 안보현실과 북한의 실상 등

◦ 교육기관 : 중앙민방위 방재교육원(안전센터)

□ 추 진 계 획

◦ 교육협의(중앙민방위 방재교육원)	:  2015. 01.

◦ 안전교육 추진계획 설명(공동주택 관리소장)	:  2015. 02.

◦ 일정별 교육 신청(500세대이상 관리소장 및 사무원)	:  2015. 02.

◦ 교육 실시	:  2015. 03. ~ 12.

□ 기 대 효 과

◦ 공동주택관리소장(사무원)을 순차적으로 교육에 참여시켜 빈번하게 발생하는 안전사고에 신속한 대처능력 강화로 시민의 안정적인 일상 도모