2015. 1. 26 ~ 2. 6.

제183회 익산시의회(임시회)

2015 주요업무계획

환경녹지국

도시공원과

□	비전 및 중점추진방향	…	65
□	일 반 현 황	…	67
□	2014 성 과 및 반 성	…	69
□	2015 주 요 업 무 계 획	…	71

비전 및 중점추진방향

	비 전
자연 생태적 녹색환경 도시 조성

		전 략 목 표
□ □ □	시민체감형 문화․여가 공간 확충 자연 친화적 녹색도시 조성 쾌적한 공원․녹지 환경 조성

		중 점 과 제
□ □ □ □	푸른 숲과 꽃이 어우러진 아름다운 녹색공간 조성 시민의 삶의 질 향상을 위한 생태 휴식공간 조성 안전하고 청결한 공원시설물 지속관리 추진 건강한 수목관리로 도심열섬현상 등 기후변화 대응

일   반   현   황

□ 기       구

				도시공원과
푸른숲조성			조 경				공 원 조 성			공 원 관 리

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	16	1	4	2	5	4
현 원	16	1	6	6	2	1
증 감			2	4	△3	△3

□ 사 무 분 장

◦ 푸른숲조성 : 도시숲 조성, 가로수 및 가로화단 조성, 학교공원화 사업,

쌈지공원조성, 수목 양묘장 관리

◦ 조      경 : 초화류 재배 및 식재, 꽃길조성 관리, 국도변 특화거리 조성,

꽃묘 양묘장 관리

◦ 공 원 조 성 : 공원조성, 공원녹지조성사업, 공원리모델링사업

◦ 공 원 관 리 : 공원시설물 설치 및 유지관리, 공원 수목식재 및 유지 관리

(전지, 수목병해충 방제, 예취, 풀메기)

2014 주 요 성 과

□ 공모사업 적극 추진으로 시민들의 힐링 공간 및 생태 교육 공간 마련

◦ 녹색 나눔숲 조성사업

▸ 국비 투입 400백만원(전북대 익산캠퍼스 실습장)

◦ 녹색공간 조성사업

▸ 도비 투입 290백만원(동그라미재활원, 이리자선원, 전북혜화학교)

□ 아름다운 거리 조성으로 자연친화적 도시미관 개선

◦ 계절별 꽃 식재 : 메리골드 외 15종 550,000본(시 직영재배)

◦ 서동축제 및 평생학습축제 등 행사지원 : 30,000여본

◦ 중앙동 특화 꽃 거리 조성 : 꽃걸이, 사각화분 등 설치

□ 생물다양성 증진 기반 마련 및 생태환경 복원

◦ 소라산 공원 자연마당 조성사업

▸생태계 복원 및 도심내 생태숲 조성을 위한 자연마당 조성공사 착수

- 공사기간 : 2014. 11월 ~ 2015. 12월

◦ 신용 쉼터 조성사업

▸연방죽을 활용한 도심내 수변쉼터 조성공사 착수

- 공사기간 : 2014. 11월 ~ 2015. 4월

□ 쾌적하고 안전한 공원환경 조성

◦ 공원 파손 및 노후 시설물 등 정비 : 한솔공원 외 40개소

◦ 수목보식 및 야생화 식재 : 남중공원 외 13개소

▸ 수목(느티나무 외 5종 5,142본), 야생화(금계국 외 1종 35,000본)

◦ 수목관리 : 영등근린공원 외 116개소

▸ 수목병해충방제, 소나무 전지, 가지치기, 지주목 정비 등

2015 주요업무계획

		도시숲 조성 및 관리 복지시설 나눔숲 조성사업 자연친화 감성 꽃거리 조성사업 소라산 공원(자연마당) 조성 사업 도시공원 및 녹지 관리 구)동익산역~춘포역일원 공원구역결정 및 공원조성계획수립용역

1		도시숲 조성 및 관리

□ 사 업 개 요

◦ 위    치

▸가로수 조성  :  국도1호선등 2개노선 6km

▸가로수 유지관리  :  하나로 등 120개 노선 340km

◦ 사 업 비 : 592백만원(지특 200, 시비 392)

▸가로수 조성      :  400백만원(지특 200, 시비 200)

▸가로수 유지관리  :  192백만원(시비)

□ 추 진 계 획

◦ 가로수 조성

▸관련부처 협의(국토관리청 등)	:  2015. 1.

▸가로수 심의위원회 개최 및 실시설계 용역	:  2015. 2.

▸설계심의 및 계약 심사	:  2015. 2. ~ 3.

▸사업추진	:  2015. 3. ~ 5.

◦ 가로수 유지관리	:  2015. 2. ~ 12.

▸수형조절 및 부정아 제거, 병해충 방제 등

□ 기 대 효 과

◦ 쾌적한 도시환경 조성으로 시민의 삶의 질 향상 기반 마련

2		복지시설 나눔숲 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  :  용안면 교동리 훈훈한집

◦ 사업내용  :  산책로 조성, 콘크리트 바닥철거, 수목식재, 벤치설치 등

◦ 사 업 비  :  100백만원(도비 - 산림청 녹색사업단 공모사업 선정)

◦ 사업기간  :  2015. 1 ~ 7월

□ 추 진 계 획

◦ 실시설계 용역                              :  2015. 1. ~ 2.

◦ 산림청 녹색사업단 사전심사, 여성친화컨설팅, 도시경관디자인,

계약심사 등                                :  2015. 3.

◦ 공사 착공 및 준공                          :  2015. 3. ~ 7.

□ 기 대 효 과

◦ 녹색공간이 없는 삭막한 장소에 자연친화적인 나눔숲과 산책로를 조성하여 소외계층의 정서적 안정과 건강한 육체를 단련시킬 수 있는 공간 제공

3		자연친화 감성꽃거리 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업내용  : 주요 도로변 가로화단 및 교통섬 등 꽃식재

◦ 식재본수  : 500,000여본

◦ 사 업 비  : 250백만원

◦ 사업기간  : 2015. 1 ~ 12월

□ 추 진 계 획

◦ 일년생 및 다년생의 다양한 초화류 재배 식재

▸꽃    종 : 튤립, 펜지, 페츄니아, 메리골드 등 10종

▸꽃 재 배 : 목천동 직영 꽃 양묘장

▸식재본수 : 450,000본 (봄, 여름, 가을 3회 재배 및 식재)

▸식재장소 : 가로화단, 교통섬, 주요 노선별 원형화분 등

◦ 축제 등 각종 행사 꽃 지원

▸꽃    종 : 펜지, 페츄니아, 메리골드 등 (40,000여본)

◦ 주요도로변 꽃걸이 설치

▸시청 주변 외 1개소 약 150개 설치(10,000여본)

□ 기 대 효 과

◦ 아름다운 꽃거리 조성으로 시민 및 방문객에게 볼거리 제공

◦ 쾌적한 도시환경 조성으로 삶의 질 향상 및 시민의 정서순화

4		소라산 공원(자연마당) 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 영등동 산140번지 일원(소라산 일대)

◦ 사 업 량 : 생태공원 42,254㎡

◦ 사업내용 : 자연생태숲, 산책로, 생태습지, 체험관 등

◦ 사 업 비 : 11,362백만원(토지매입비(시) 8,362, 공사비(국) 3,000)

◦ 사업시행 : 환경부(시공사 ㈜송림에코원)

◦ 공사기간 : 2014. 11월 ~ 2015. 12월

□ 추 진 계 획

◦ 편입토지 및 지장물 보상                    :  2015.  1 ～ 11월

◦ 자연마당 조성 사업 완공                    :  2015.  12월

□ 기 대 효 과

◦ 소라산의 생물 다양성 증진으로 도시 생태계의 건전성 향상

◦ 쾌적한 생태 휴식공간 조성으로 도시민의 삶의 질 향상 도모

5		도시공원 및 녹지 관리

□ 사 업 개 요

◦ 대    상  :  공원 70개소 216㏊,  녹지 47개소 34㏊

◦ 사업내용  :  시민 누구나 안전하고 편안하게 이용할 수 있는 공원시설 정비 및 수목 관리

◦ 사 업 비  :  1,261백만원(시설관리 685, 수목관리 576)

◦ 사업기간  :  2015. 1 ~ 12월(연중)

□ 추 진 계 획

◦ 시민편익 증진을 위한 노후·파손시설물 유지보수  :  2015. 1. ~ 12.

▸배수로, 산책로, 운동시설, 놀이기구, 전기시설, 위생설비 등

◦ 건전한 생육을 위한 수목관리                    :  2015. 1. ~ 12.

▸전지작업, 병해충방제, 비료주기, 고사지 및 지주목 정비 등

◦ 공원 수목 및 초화류 식재                       :  2015. 3. ~  4.

▸철쭉 등 관목류 및 야생화 식재

◦ 공원환경정비                                   :  2015. 1. ~ 12.

▸기간제 근로자를 채용하여 화장실(48개소) 및 공원 청소

◦ 잔디 및 제초관리                                :  2015. 3. ~ 11.

▸풀메기 작업 및 예취기를 이용한 풀깎기 작업

□ 기 대 효 과

◦ 공원 및 녹지의 유지관리를 통해 쾌적하고 안전한 도시환경조성으로        시민의 건강·휴양 및 정서함양으로 삶의 질 향상

6		구)동익산역~춘포역일원 공원구역 결정 및 공원조성계획 수립 용역

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 구)동익산역 ~ 춘포역 일원(4.8km)

◦ 규    모 : 102,000㎡(동익산역 46,400, 연결구간 38,400, 춘포역 17,200)

◦ 용역내용 : 폐선구간 공원구역 결정 및 공원조성계획 수립

▸인위적 구조물을 배제한 자연친화적 개발 구상

◦ 용 역 비 : 200백만원

◦ 용역기간 : 2015. 2 ~ 12월

◦ 구역도

□ 추 진 계 획

◦ 편입토지 사용 협의(한국철도시설공단)

▸편입토지 매입시 막대한 예산 소요로 임대계약 후 장기적 매입 검토(한국철도시설공단)

- 소요 예산 비교 -

구 분	면적(㎡)	추정액	비 고
임 대	102,000	2억원/년	임대율 2.5% 기준
토지매입	102,000	150억원	공시지가 2배 기준

◦ 대상지 입지여건(익산과 삼례를 연결하는 국도변, 도농연결로)과 총연장(4.8㎞)을 활용한 계절별 테마산책로 등 랜드마크적 지역명소로 구상

(식목일 나무심기 행사 등 민간참여를 활용한 사업비 절감 도모)

□ 기 대 효 과

◦ 행복주택건설(LH공사)로 인한 구)동익산역 일원 주민편의시설(운동기구, 모정 등) 철거에 따른 대체 공간 조성

◦ 구)동익산역~춘포역을 잇는 폐선부지를 활용한 자연형 여가공간 조성

▸2014. 5월 폐선구간 도시계획시설(철도) 폐지(국토교통부)