2015. 1. 26 ~ 2. 6.

제183회 익산시의회(임시회)

2015 주요업무계획

상하수도사업단

보 고 순 서

□	일반현황	………	1
□	상수관리과	………	3
□	하수관리과	………	19
□	하수관리과	………

일   반   현   황

□ 기구 및 정․현원

◦ 기    구  …………………………………………………    2과 11담당

														상하수도사업단
				상수관리과																					하수관리과
상수행정			정수생산			급수시설				요금					누수방지			수질실험				하수행정				하수시설					하수운영			생 활 하 수				하수관리

◦ 정․현  원

(정원/현원)

구 분	정원	현원	증감	직 급 별
				4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구
계	73	73		1 1	2 2	16 15	20 32	16 18	16 3	2 2
상수관리과	45	44	△1	1 1	1 1	8 7	13 20	11 12	9 1	2 2
하수관리과	28	29	1		1 1	8 8	7 12	5 6	7 2

□ 부서별 주요업무

부 서	주 요 업 무
상수관리과	∙ 상수도 종합계획수립, 상수도특별회계 현금출납 및 금고감독 ∙ 예산편성 및 결산, 계약, 공유재산관리 ∙ 상수도 사용료 조정, 계량기 교체 ∙ 수도정비기본계획수립, 급․배수공사 설계 및 감독 ∙ 간이 상수도 및 소규모 급수시설관리, 개인 급수공사 ∙ 누수방지 및 누수탐사 기획, 노후관 개량공사 및 감독 ∙ 정수생산, 정수시설물관리, 읍․면배수지 관리 ∙ 상수도 수질실험, 상수원 수질검사 ∙ 정수약품 관리, 상수원 보호구역 관리
하수관리과	∙하수도 종합계획 수립, 하수도 특별회계 현금출납 및 금고감독 ∙계약, 하수도사용료 및 원인자부담금 부과징수 ∙하수관거임대형민간투자사업, 하수관거정비재정사업 ∙유천생태습지조성 및 생태하천복원사업 ∙공공하수처리시설 설치․개선․운영관리, 하수슬러지처리시설 설치사업 ∙소규모공공하수처리시설 운영,관리 ∙개인하수처리시설설치신고․준공․지도점검 ∙분뇨수집 운반업 허가 및 지도점검 ∙시내일원 긴급하수도공사, 생활민원처리 ∙하수도기계준설 및 맨홀정비

상수관리과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2014 성과 및 반성
□	2015 주요업무계획

비전 및 중점추진방향

	비 젼
안전하고 깨끗한 수돗물의 안정적 공급

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦ ◦	보다 안전한 생활용수 공급을 위한 광역상수도 전환 자체 수돗물 목표 수질기준 설정운영 유수율 향상을 통한 공기업 경영 효율성 제고 수돗물 신뢰 향상을 위한 시민참여 활성화

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	광역상수도 전환 필요성에 대한 올바른 이해로 시민 공감대 확산 정수시설 효율적 운영관리 및 상수원 수질관리 강화 상수관망 최적 관리 시스템 구축 수돗물 수질검사 등 시민참여 프로그램 운영

일   반   현   황

□ 기     구

											상수관리과
상 수 행 정				정 수 생 산						급 수 시 설					요 금				누 수 방 지						수 질 실 험

□ 정․현 원

(단위 : 명)

구 분	계	직 급 별							비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구
정 원	45	1	1	8	13	11	9	2
현 원	44	1	1	7	20	12	1	2
증 감	△1			△1	7	1	△8

□ 사  무  분  장

◦	상수행정	:	상수도종합계획수립, 예산편성 및 결산, 입찰 및 계약, 공유재산관리
◦	정수생산	:	정수생산기획조정, 정수장시설물관리, 배수지관리
◦	급수시설	:	상수도정비기본계획수립, 급․배수공사설계 및 감독, 공동주택저수조 청소, 간이상수도 및 소규모급수시설관리, 개인급수공사
◦	요 금	:	급수사용료조정, 수입예산정리 및 정산, 계량기교체, 체납요금징수
◦	누수방지	:	누수방지 및 누수탐사기획, 노후관개량공사 및 감독, 누수탐사, 누수처보수, 상수도관망도 정리, 변류수리 및 교체
◦	수질실험	:	수도수질실험 기획, 상수원수질검사, 정수약품 구입관리, 상수원 보호구역관리, 수도꼭지 수질검사

□ 수돗물평가위원회 현황

(단위 : 명)

구 성	위 원				임 기	비 고
	공무원	시의원	교수	시민단체
10	2	1	2	5	2 년	남 6, 여 4

※ 근 거 : 수도법 제30조의1,  익산시 상수도급수조례 제48조

□ 상수도 급수인구 현황

(단위 : 명)

구 분	총인구	급수인구	보급율 (%)	비 고
계	304,117	300,771	98.9
도심권	237,960	237,657	99.9
읍면권	66,157	63,114	95.4

□ 상수도 급수시설 현황

(단위 : ㎥/일)

구 분		시설용량	급 수 량	비 고
계		230,300	145,657
생 활 용 수	소 계	195,300	120,951	100%
	광 역	105,300	47,866	39.5%
	자 체	90,000	73,085	60.5%
공 업 용 수	자 체	35,000	24,706

□ 상수도 사용 현황

(단위 : 전, ㎥)

구 분 업 종	급수전수	월평균 사용량	비율(%)	비 고
계	60,569	3,225,883	100
가 정 용	46,650	1,579,020	48.9
일 반 용	13,210	590,212	18.3
산 업 용	577	311,980	9.7
대중탕용	32	5,642	0.2
전용공업용	100	739,029	22.9

□ 상수도 관로 현황

(단위 : ㎞)

계	도수관	송수관	배수관	급수관	비고
1,865.2	2.5	25.3	1,166.7	670.7

□ 상수도 시설 현황

시 설 명	개 소	시설용량	비 고
정 수 장	2	125,000㎥/일	신흥, 금강
배 수 지	5	47,500㎥	신흥, 금강, 금마, 팔봉, 삼기
가 압 장	2	48,600㎥/일	금마, 삼기
보조수원지	1	1,053,000㎥	신흥

2014 성과 및 반성

□  광역상수도 전환 필요성 인식 및 시민공감대 확산

○ 광역상수도 전환대상지역 주민설명회 실시

○ 상수원 수로 현장탐방 실시

□ 유수율 제고사업 추진 경영개선 기반 조성

○ 읍면지역 상수관망 블록구축 : 4개소(함라외 5개면 지역)

○ 상수도 노후관 교체/소규모 누수처 복구 : 3개소, 3.4km/1,084개소

○ 강관 전기 부식방지시설     : 5개소

□  효율적 검침 및 부과․징수로 경영 효율화 제고

○ 정확한 검침으로 투명한 부과체계 확립 : 검침원 교육 12회

○ 상수도 체납요금 징수반 편성운영으로 징수율 제고 : 징수율 98.6%

□ 상수도 시설개선 등을 통한 안정적 급수체계 구축

○ 급수구역 확장공사 추진  : 14개소, 8.4km

○ 급수관 통합공사/배수관 개선공사 추진 : 85개소, 9.2km

□ 상수도 생활민원 적극해소로 시민불편 최소화

○ 계량기 동파방지 보온재 설치 : 거동 불편자, 독거노인세대 등 477개소

□ 상수관리과 전직원 8개반 24명으로 편성 직접 방문 설치

○ 급수장치 수선 공사       : 3,509건

○ 공공 상수관로 누수탐사/수용가 옥내누수 탐사 : 294건/1,224건

○ 상수관 부설도로 노면정비 : 82개소, 16.0km

2 0 15  주 요 업 무 계 획

		생활용수 급수체계 광역상수도 전환
		익산시 상수관망 최적화 및기술진단용역
		유수율 제고 및 효율적 징수를 통한경영합리화
		급배수구역확장 및 급배수관 민원해소
		안전하고 깨끗한 수돗물 공급

1		생활용수 급수체계 광역상수도 전환

	◦ 개방형 농업용수 상수원 이용에 따른 수질오염 발생요인 상존 ◦ 새만금 수질개선을 위해 목적(농업용수)외 용수 사용허가 연장 어려움

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2014년 ~ 2017년

◦ 사 업 비 : 13,800백만원(시비 400, 수자원공사 13,400)

◦ 사업내용 : 자체 생활용수 공급체계를 광역상수도로 전면 전환

□ 추 진 계 획

◦ 광역상수도 전환 시민 공감대 형성 노력

▸대간선수로, 용담댐 등 현장행정 추진으로 공감대 형성 : 2015. 02

▸광역상수도 전환 공감대 형성을 통한 용역 예산 확보 : 2015. 1차 추경

◦ 수도정비기본계획 변경용역 발주	: 2015. 1차 추경 반영

◦ 수도정비기본계획 변경 환경부 승인 : 2016. 07 이전

◦ 수자원공사 광역상수도 공급 송수관 연결 : 2016. 12

□ 기 대 효 과

◦ 보다 안전한 상수원인 용담호를 이용한 깨끗하고 안전한 수돗물 공급

2		익산시 상수도관망 최적화 및 기술진단용역

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 비 : 27,000백만원(용역비 1,400, 공사비 25,600)

▸기 투자사업비 : 1,400백만원(2014년 : 1,000 , 2015년 : 400)

◦ 사 업 기 간 : 2014 ~ 2020( 7개년 )

◦ 연도별 투자 계획                                (단위 : 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017	2018	2019이후
계	27,000	1,000	400	5,000	5,000	5,000	10,600
용 역 비	1,400	1,000	400	-	-	-	-
공 사 비	25,600	-		5,000	5,000	5,000	10,600

◦ 주요 사업내용

▸상 수 관 망  블 록 구 축  : 블록별 유량계 및 감압, 가압시설 설치 등

▸노후관 교체 및 관로 정비   : 누수방지 및 급수상황 개선 등

▸급수상황 관제 시스템 구축 : 급수상황 실시간 감시 유수율 제고

□ 추 진 계 획

◦ 익산시 상수도관망 최적화 및 상수도관망 기술진단 용역

▸ 용역사업 발주(조달청) --------------------------- 2014. 12. 17

▸ 용역업체 선정 및 착공 ------------------------------ 2015. 02

□ 기 대 효 과

◦ 노후화된 관로 시설물에 대한 효율적인 정비로 생산원가 절감 및 유수율 제고

◦ 상수도 급수현황 실시간 모니터링을 통한 급수사고 신속대응

3		유수율 제고 및 효율적 징수를 통한 경영합리화

□ 사 업 개 요

◦유수율 제고사업

단 위 사 업 명	위 치	사 업 량	사업비 (백만원)	비 고
계			3,950
노후관 교체공사	주현동 한양아파트 외 4개소	6.0km	1,500
읍면지역 블록구축	금마, 낭산수계	3개블록	1,000
긴급 누수처 복구	관내 일원	1,200개소	1,200
변류 정비공사	〃	150개소	150
시내일원 누수탐사	〃	20.0km	100

◦효율적 검침 및 부과․징수

▸ 2015년 요금부과 및 징수 목표액  : 27,374백만원/26,990백만원(98.6%)

▸ 과년도 체납액 징수목표  :   713백만원/ 213.9백만원(30.0%)

.

□ 추 진 계 획

◦ 노후관 교체 공사 (5개 사업, L=6.0km) ---------- 2015. 01. ~ 10.

◦ 읍면지역 블록구축 (3개 블록) ------------------- 2015. 01. ~ 10.

◦ 시내일원 누수탐사 ----------------------------- 2015. 01. ~ 10.

◦ 긴급 누수처 복구 및 변류 정비 -------------------------  연  중

◦ 노후계량기교체(6,000전) -----------------------  연  중     ◦ 검침곤란 수용가 옥외검침기 구입 설치(500전) ----------------  연  중

◦ 상수도 체납요금 징수반 편성운영(8명) ----------------  연  중

□ 기 대 효 과

◦ 노후 상수도관 교체 및 정비 등을 통한 누수 및 수질오염 예방

◦ 효율적인 검침 및 상수도요금 부과․징수를 통한 경영 효율화 기여

4		급수구역 확장 및 급·배수관 민원해소

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2015. 12.

◦ 사업내용

구 분	위치	사업량	사업비 (백만원)	비고
계			1,775
급수구역 확장공사	여산면 상양마을	0.4km	60
	춘포면 원쌍정마을	0.9km	135
급·배수관 민원공사	익산시 일원	10.0km	900
가압장 설치공사	신동 826번지 일원	가압펌프 15마력*4대	150
	팔봉동 828번지 일원	가압펌프 5마력*2대	30
상수도 부설도로 노면정비공사	익산시 일원	8.0km	500

□ 추 진 계 획

◦ 급수구역 확장 및 상수도 부설도로 노면정비 공사

▸ 현지조사 및 설계 ---------------------------- 2015. 01 ~ 03

▸ 공  사  기  간  ----------------------------  2015. 04 ~ 10

◦ 급·배수관 민원공사

▸ 수압저조로 인한 급수불출 민원 발생시 ---------------- 연  중

◦ 가압장설치공사

▸ 현지조사 및 설계 ---------------------------- 2015. 01 ~ 03

▸ 공  사  기  간  ----------------------------  2015. 04 ~ 10

□ 기 대 효 과

◦ 급수구역 확장으로 지하수 오염 우려지역 안전하고 깨끗한 수돗물 안정적 공급

◦ 수압저조에 따른 가압장 설치, 급·배수관 확장 및 통합으로 시민불편 해소

5		안전하고 깨끗한 수돗물 공급

□ 현      황

구 분	시설용량 (㎥/일)	급 수 량 (㎥/일)	비 율 (%)
계	195,300	120,951	100
자체정수	90,000	73,085	60.5
광역상수도	105,300	47,866	39.5

□ 추 진 계 획

◦ 상수원 수질상태에 따른 선택적 취수로 목표 수질제 운영

▸ 목표수질 : 원수( BOD 2㎎/ℓ이하) , 정수(탁도 0.15NTU이하)

◦ 정수시설 안정적 운영관리 : 사전 점검 강화 및 효율적 시설 관리

▸ 전문기술진단 용역 및 노후 CCTV 교체 등 9건, 524백만원

◦ 원․정수 수질검사 강화

▸원수 수질검사 : 일일(5개), 주간(6개), 분기(31개 항목)

▸정수 수질검사 : 일일(7개), 주간(6개), 월간(59개 항목)

◦ 시민참여 프로그램 확대를 통한 수돗물 신뢰도 향상

▸ 2015년 수돗물 수질검사 결과 등 수돗물 품질보고서 배포  : 50,000부

▸ 민․관합동 수질검사 및 수돗물평가위원회 실시 : 연 2회

□ 기 대 효 과

◦ 원 · 정수 수질검사 강화 및 시민참여 확대를 통한 수돗물에 대한 신뢰도 향상

◦ 정수시설 효율적 관리 및 상수원 수질 관리 강화로 안전하고 깨끗한 수돗물 공급