2015. 1. 26 ~ 2. 6.

제183회 익산시의회(임시회)

2015 주요업무계획

상하수도사업단

하 수 관 리 과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2014 성 과 및 반 성
□	2015 주 요 업 무 계 획

비전 및 중점추진방향

	비 전
완벽한 하수처리로 녹색 청정 익산건설

		전 략 목 표
◦ ◦	하수처리 운영 효율 증대로 쾌적한 주거환경 제공 수질개선을 통한 삶의 질 향상으로 시민만족 행정 구현

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	정화된 하수를 이용한 방류수 재이용 및 생태습지공원 조성 하수관거사업 추진으로 방류지역의 수질보전 완벽한 하수처리를 위한 과학적 하수처리시설 설치

일   반   현   황

□ 기       구

					하수관리과
하수행정			하수시설			하수운영			생활하수			하수관리

□ 정  ․  현  원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별								비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	계약	기타
정 원	28		1	8	7	5	7	0	0
현 원	29		1	8	12	6	2	0	0	육아휴직 1명 (16.6.30.까지)
증 감	1		0	0	5	1	▵5	0	0

□ 사  무  분  장

◦	하수행정 :	하수행정종합계획수립조정, 하수도특별회계 현금출납 및 금고감독, 입찰 및 계약, 하수도사용료․원인자부담금 부과징수, 공기업평가 결산
◦	하수시설 :	하수정비기본계획 수립, 하수관거임대형민간투자사업(BTL),하수관거정비사업, 유천생태습지 및 생태하천 복원사업, 북부하수처리장주민숙원사업
◦	하수운영 :	하수슬러지처리시설설치사업, 공공하수처리시설 설치․개선․운영관리, 3산단 폐수종말처리시설 운영관리
◦	생활하수 :	개인하수처리시설설치신고․준공․지도점검, 분뇨수집․운반업 허가 및 지도점검, 지하수개발이용 허가․신고․준공, 공중화장실, 배수설비협의
◦	하수관리 :	시내일원하수도공사, 하수생활민원처리, 주민숙원사업, 맨홀정비, 준설원관리, 온천지구 지정 및 관리

□ 하수도 사용 현황

(단위 : 전)

구 분 업 종	계	상하수도	지 하 수	비 고
계	36,843	36,219	624
가 정 용	26,155	26,137	18
일 반 용	10,138	9,659	479
대중․산업용	550	423	127

□ 하수도 관로 현황

(단위 : km)

구 분	시설계획	시 설	미시설	설치율(%)	비 고
계	1,413	1,242	171	87.8
우 수 관	814	797	17	97.9
오 수 관	537	392	145	72.9
차 집 관	62	53	9	85.5

□ 하수처리시설 현황

시 설 명	개 소	처리용량	비 고
계	27	139,521㎥/일
익산공공하수처리시설	1	100,000㎥/일
함열공공하수처리시설	1	6,000㎥/일
북부공공하수처리시설	1	30,000㎥/일
금마공공하수처리시설	1	1,100㎥/일
여산공공하수처리시설	1	600㎥/일
소규모 공공하수처리시설	21	1,671㎥/일
분뇨처리장	1	150㎥/일

2014 성과 및 반성

□ 성      과

◦ 오․우수관 분리로 하수처리시설 효율개선 및 쾌적한 생활환경 조성

▸ ‘09BTL 사업 및 함열․춘포처리구역 하수관거 정비사업 추진

: 관거정비 15km,  배수설비 1,200개소

◦ 공공하수처리장 최적운영을 통한 수질환경개선

▸ 총27개소(139,521㎥/일) 하수처리시설의 정상가동 및 유지관리

▸ 수질자동측정장치(TMS)를 통한 방류수질 실시간 감시제어

▸ 하수처리시설 개선공사를 통한 처리효율 향상 및 수질오염 저감

◦ 유천 생태습지 및 생태하천 복원사업으로 친수문화공간 조성

▸ 생태습지 부지조성, 생태수로, 산책로 조성 완료

▸ 선진지 견학(서천국립생태원, 경안천 광동리습지) 및 주민간담회를 통한 동산동주민센터 부지확보, 해룡언덕, 어울림광장 반영

◦읍면동 소규모 하수도시설공사 및 생활민원 신속처리로 신뢰받는 하수행정 구현

▸ 하수도정비 L=10㎞, 하수도기계준설 1,800㎥

▸ 365일 누수없는 비상대기 근무로 1,694건의 하수생활민원 처리

▸ 원활한 하수배제를 위한 맨홀 및 하수도 준설 931건, 파손 하수관로   복구 및 맨홀 단차조정 513건 실시

□ 아쉬운  점

◦ 하수관거 공사에 따른 시민불편 초래

▸ 공사안내현수막 게시 및 주민간담회를 통한 하수관거 공사 홍보를 지속적으로 추진하였으나 구간별 복구가 지연되는 곳이 발생하여 시민불편 초래

2015 주요업무계획

		함열․춘포 처리구역 하수관거 정비사업 유천생태습지 및 자연형하천 복원사업 천서․왕궁지구 하수관거 정비공사 화정지구 소규모마을하수처리장 설치사업 읍면동지역 하수도 시설 및 준설공사

1		함열․춘포 처리구역 하수관거 정비사업

□ 사 업 개 요

구 분	위 치	사 업 량	사업비(백만원)			사업기간	비고
			계	국비	지방비
함열처리 구 역	계	관거정비L=22.7km 배수설비 591가구	16,446	11,512	4,934	11.01~15.12
	용안면 (신은)	관거정비L=9.9km 배수설비 241가구	7,368	5,157	2,211
	낭산면 (북지)	관거정비L=6.9km 배수설비 198가구	5,855	4,099	1,756
	성당면 (성당)	관거정비L=5.7km 배수설비 152가구	3,223	2,256	967
춘포처리 구 역	춘포면	관거정비L=10.4km 배수설비 427가구	8,043	5,630	2,413	11.01~15.12

◦ 2015년 예산 : 6,304백만원(국비4,438 도비60 지방비1,806)

▸시비부족분 추경에 확보(1,218백만원)

□ 추 진 계 획

◦ 2015년 12월까지 전체공사 완료 추진예정

▸ 하수관거 신설 및 교체 - 오수관거 L=8.9km

▸ 배수설비(가정관로) 설치 984가구

□ 기 대 효 과

◦ 정화조 폐쇄에 따른 관리비용 절감 및 건물신축 용이

◦ 우․오수관 분리로 공공하수처리시설 운용효율 개선 및 방류수역 수질오염 저하

◦ 농촌마을 하수도 보급 증대에 따른 주거생활환경 개선

2		유천생태습지 및 자연형하천 복원사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 금강동 993-1번지 일원

◦ 사업규모 : 생태하천복원 1.3㎞ / 생태습지조성 134,521㎡

◦ 사 업 비 : 28,550백만원(국비14,061 시비14,489)

▸ 2015년 예산 – 1,374백만원 (시비1,374)

▸시비부족분 추경에 확보(921백만원)

◦ 사업기간 : 2009. 01 ～ 2015. 09

□ 추 진 계 획

◦ 생태습지 및 생태하천 2015년 12월까지 전체공사 완료 추진예정

▸ 생태습지 - 황토포장 3,942㎡, 조경수·수생식물 식재

▸ 생태하천 - 자연석쌓기 7,000㎥, 식생매트 10,258㎡ 설치 등

▸ 기    타 – 부대시설물 공사 및 마무리 추진

□ 기 대 효 과

◦ 도심권역 내 친수공간을 확보하여 시민 정서 함양 기여

◦ 하수종말 방류수 재이용으로 하천의 자생기능 및 수생태건강성 회복

◦ 쾌적한 하천환경 조성으로 지역주민에게 친숙하고 쾌적한 생활공간 조성

3		천서․왕궁지구 하수관거 정비공사

□ 사 업 개 요

◦ 위 치 : 익산시 왕궁면 온수리 17-55번지 일원(익산, 금오, 신촌농장), 익산시 춘포면 천서리, 오산리, 창평리, 일원

◦ 사 업 량 : 오수관로 45.1km, 배수설비 854개소

◦ 사 업 비 : 25,125백만원[국비(70%) 17,586 도비(3%) 754 시비(27%) 6,785]

▸2015년  : 9,676백만원[국비 6,773, 도비 290, 시비 2,613]

▸시비부족분 추경에 확보(2,300백만원)

◦ 사업기간 : 2014. 1 ~ 2016. 12

□ 추 진 계 획

◦ 천서․왕궁지구 하수관거정비공사 사업자선정(조달청)	2015. 1

◦ 천서․왕궁지구 하수관거정비공사 감리 사업자선정	2015. 2

◦ 공사 착공	2015. 3

▸터파기 및 관로공사	2015. 3 ~ 2016. 10

▸중계펌프장 가설공사	2015. 3 ~ 2016. 4

▸전기, 계측제어공사	2015.10 ~ 2016. 10

◦ 공사 준공	2016. 12

□ 기 대 효 과

◦ 왕궁특수지역 및 춘포천서 일대 공공하수처리구역 확대로 구역 내 수질오염을 저감 만경강 수계의 맑은 물 보전 및 쾌적한 생활환경 개선

4		화정지구 소규모마을하수처리장 설치사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 망성면 내촌리 일원(교황, 지장, 내촌, 신흥, 방축, 화정, 미동, 동촌)

◦ 사 업 량 : 오수관로 10.4km, 마을하수처리장 120㎥/일, 배수설비 256개소

◦ 사 업 비 : 5,464백만원[국비(70%) 3,825 지방비(30%) 1,639]

▸2015년 사업비 : 3,417백만원[국비 2,392, 시비 1,025]

▸시비부족분 추경에 확보(844백만원)

◦ 사업기간 : 2014. 1 ~ 2016. 12

□ 추 진 계 획

◦ 화정지구 소규모마을하수처리장 설치 사업자선정	2015. 1

◦ 화정지구 소규모마을하수처리장 설치 감리 사업자선정	2015. 2

◦ 공사 착공	2015. 3

▸토목공사	2015. 3 ~ 2016. 2

▸건축공사	2015. 3 ~ 2015. 6

▸기계공사	2015. 3 ~ 2016. 4

▸전기, 제어공사	2015.10 ~ 2016. 8

▸시운전	2016. 8 ~ 2016.12

◦ 공사 준공	2016. 12

□ 기 대 효 과

◦ 금강 수계지역 수질오염 예방으로 맑은 물 보전에 기여하고 농촌마을의 쾌적한 주거환경 및 주민 보건위생 향상

5		읍․면․동지역 하수도 시설 및 준설공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원(29개 읍면동)

◦ 사 업 량 : 하수도정비 L=10km, D300～1200mm

◦ 사 업 비 : 996백만원(시비 996)

▸ 읍면동 지역 하수도 시설공사(처리구역내/300백만원)

▸ 읍면동 주민참여 예산편성사업(24개소/134백만원)

▸ 하수도 기계준설(300백만원)

▸ 단가계약 공사(100백만원)

▸ 씽크홀 및 하수관파손 도로긴급복구공사(100백만원)

▸ 여산면 태성교회앞 외 2개소 하수도정비공사(62백만원)

◦ 사업기간 : 2015. 1 ～ 2015. 11

□ 추 진 계 획

◦ 읍면동별 사업대상지 현장조사 및 자체설계	2015. 1 ~ 2015. 2

◦ 공사 발주 및 추진	2015. 3 ~ 2015. 11

□ 기 대 효 과

◦ 우기철 침수피해 예상지역 및 하수관거 미설치 지역에 대한 하수도 정비로 쾌적한 주거환경 도모

◦ 하수관내 퇴적토와 슬러지에 대하여 기계준설 실시로 하수관 막힘(역류)

및 악취 등 주민 생활의 불편을 해소