2015. 1. 26 ~ 2. 6.

제183회 익산시의회(임시회)

2015 주요업무계획

국가식품클러스터

추 진 지 원 단

보 고 순 서

□	일반현황	………	3
□	사업지원과	………	5

일   반   현   황

□ 기구 및 정․현원

◦ 기    구  ………………………………………………  1과  3담당

							국가식품클러스터추진지원단
								사업지원과
						식품산업						유치홍보			지원협력

◦ 정 ․ 현  원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	13	1	1	3	4	4	0
현 원	13	1	1	3	6	1	1
증 감	0	0	0	0	2	△3	1

□ 부서별 주요업무

부 서	주 요 업 무
사업지원과	∙식품전문산업단지조성 지원, 산업단지 기반시설 확충 ∙국내․외 식품기업 및 연구소 투자 유치 ∙국가식품클러스터 대내․외 교류 협력사업추진 ∙홍보관 운영 등 국내․외 홍보 및 유치전략 수립 ∙사업지구내 거주자 이주대책수립 및 추진 ∙지역식품육성 지원, 식품안전생산기반 조성 ∙여성친화 고품격 정주환경 제공을 위한 배후복합단지 조성

사업지원과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2014 성 과 및 반 성
□	2015 주 요 업 무 계 획

비전 및 중점추진방향

	비 전
글로벌 5대 식품클러스터 육성

		전 략 목 표
◦ ◦	식품클러스터의 신속한 구축 국내․외 유수기업 및 연구소 유치

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	동북아 식품시장 선점을 위한 식품전문산업단지의 차질없는 공사추진 기업활동에 적합한 인프라 구축 및 국가식품클러스터 기반시설확충 3대 R&D 및 기업지원시설 건립으로 푸드폴리스 경쟁력 강화 최적의 기업 유치전략 마련 및 유치활동

일   반   현   황

□ 기          구

						사업지원과
	식품산업						유치홍보					지원협력

□ 정  ․  현  원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	13	1	1	3	4	4	0
현 원	13	1	1	3	6	1	1
증 감	0	0	0	0	2	△3	1

□ 사  무  분  장

◦ 식품산업	:	국가식품클러스터 기획조정, 대내․외 교류 협력사업추진 국가식품클러스터 인적네트워크 구축, 지역식품육성지원 식품안전생산기반 조성
◦ 유치홍보	:	국내외 식품기업 및 연구소 투자 유치 홈페이지 관리, 국내․외 홍보전략 수립 홍보관 운영 및 각종 홍보물 제작
◦ 지원협력	:	식품전문산업단지 조성지원, 산업단지 기반시설 확충 사업지구내 거주자 이주대책수립 및 추진, 소송사무 수행 토지매입․보상사무 지원, 배후복합단지 조성

2014 성과 및 반성

□ 성      과

◦ 국가식품클러스터 산업단지 조성공사 착공 및 분양공고

▸산업단지 조성공사 착공(1공구)                : ‘14. 3.20

▸산업단지 조성공사 착공(2,3공구)               : ‘14. 6.27

▸국가식품클러스터 보상 완료                  : ‘14. 7.14

▸국가식품클러스터 기공식 개최                : ‘14.11.24

▸국가식품클러스터 산업단지 분양공고          : ‘14.11.28

◦ 기반시설 확충 및 정부지원시설 구축

▸진입도로 설계 용역 및 보상공고    : ‘13. 4월~’14.10월 / ‘14.10.10

▸정부기업지원시설 건축허가 및 착공        : ‘13.12월 / ’14. 5.14

▸가설사무실 건축공사 완료 및 파일공사      : ‘14. 9.30 ~

▸폐수종말처리시설 입찰안내서 작성 및 심의신청(LH공사) : ‘14. 7월

◦ 투자유치 및 교류협력 활동 전개

▸MOU체결(19건) : 국립원예특작과학원(5.20), 햄튼그레인즈(5.21/미국), 통식푸드‧

퐁잇카야‧씨에이치씨푸드‧췌춘그룹‧치셍오일팩토리‧학리안후앗‧타이후아푸드

(7.10/싱가포르), 차오마마(8.28/중국), 천호식품(9.30/국내), 하림식품(12.15) 등

▸LOI체결(1건) : 골드락인터네셔널(6.12/케냐)

▸네덜란드 바네벨트시 우호협약 체결

▸외국인투자신고(3건) : 웰스프링(5.12/미국), 칭화즈광과학원(5.12/중국)

, 골드락인터네셔널(11.6/케냐)

▸국내․외 투자유치관 운영(14회) : Vitagora Congress(4월/프랑스), 싱가포르 식품박람회(4월/싱가포르), 프랑스SIAL Paris 2014(10월/파리) 등

2015 주요업무계획

		국가식품클러스터 식품전문산업단지 조성 국가식품클러스터 기반시설 확충 국가식품클러스터 정부기업지원시설 구축 국가식품클러스터 배후복합도시 조성 국가식품클러스터 투자유치 및 교류협력 국가식품클러스터 외국인투자지역 지정

1		국가식품클러스터 식품전문산업단지 조성

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2009~ 2016년(8년)

◦ 위    치 : 익산시 왕궁면 흥암리, 광암리, 동촌리, 왕궁리 일원

◦ 총사업비 : 3.119억원(보상비 800, 공사비 2,119, 기타 200)

◦ 사업내용 : 국가식품전문산업단지 조성 232만㎡(70만평)

▸산업시설용지(제조,연구,물류) 460천평, 상업용지 8천평, 주거용지 23천평

▸지원시설용지 27천평, 기반시설용지(도로,공원,폐수처리장 등) 182천평

◦ 사업시행자 : LH공사

□ 추 진 계 획

◦ 산업단지 조성공사 추진(1, 2, 3공구)               :  2014.  3월 ~

◦ 산업단지 분양 추진(196필지 139만9천㎡)           :  2014. 11월 ~

▸산업단지 분양(1차 - 39필지 34만㎡)

▸입주심사 및 입주계약 체결(한국산업단지공단 호남지역본부)

▸산업단지 분양 계약 체결(LH공사 전북본부 판매부)

◦ 문화재 시굴․발굴조사 완료                      :  2015.  5월

◦ 산업단지 조성공사 준공                          :  2016. 12월

□ 기 대 효 과

◦ 국가식품전문 산업단지 조성을 통한 향후 거대 식품시장으로 성장할 아시아 식품시장의 선점과 지역경제 성장 견인

2		국가식품클러스터 기반시설 확충

□ 사 업 개 요

(단위 : 억원)

구 분	시설규모	사 업 비				예산 확보액			관리부처 (사업시행자)
		합계	국비	지방비	민자	합계	‘14년	‘15년
합 계		983	738	53	192	국 비 311 지방비 26 민 자 60	국 비 107 지방비 12 민 자 10	국 비 204 지방비 14 민 자 50
진입도로	L=4.1km, 4~6차선	486	486	-	-	국 비 248	국 비 100	국 비 148	국토교통부 (익산국토청)
용수공급시 설	송수관로 D=500, L=10km 배수지 Q=8.8천㎥/일 배수관로 D=500, L=1.5km	147	28	53	66	국 비 13 지방비 26 수자원 32	국 비 2 지방비 12 수자원 7	국 비 11 지방비 14 수자원 25	송수관로(수자원공사) 배수지(익산시) 배수관로(LH,익산시)
폐수종말처리시설	Q=10천㎥/일	350	224	-	126	국 비 50 LH공사 28	국 비 5 LH공사 3	국 비 45 LH공사 25	LH공사

□ 추 진 계 획

◦ 진입도로(익산지방국토관리청)

▸진입도로 부지매입 및 공사업체 선정 ‧ 착공 : 2014. 12월/2015. 2월

(토지 및 지장물 매입 : 토지 236필지 11만3천㎡, 지장물 647건)

◦ 용수공급시설(익산시, 수자원공사)

▸왕궁배수지 및 배수관로 토지보상 착수            :  2015. 2월

▸왕궁배수지 건설공사 발주(상수관리과)             :  2015. 6월

◦ 폐수종말처리시설(LH공사)

▸폐수종말처리시설 건설공사 업체 선정 및 착공     :  2015. 3월 ~

(입찰공고 2014.12.12. / 현장설명 2015.1.12. / 입찰일 2015.3.13.)

□ 기 대 효 과

◦ 국가식품클러스터 입주 기업 활동에 유리한 기본인프라 조기구축으로 기업투자유치 활성화 도모

3		국가식품클러스터 정부기업지원시설 구축

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2009 ~ 2016년(8년)

◦ 위    치 : 국가식품클러스터 단지 내

◦ 총사업비 : 2,416억원(국비 1,616, 지방비 634, 민자 166)

(단위:백만원)

구 분	소요액	예산 확보액				비고
		합 계	‘14년까지	‘15년	‘16년이후
합 계	241,600	241,600	64,926	8,838	167,836
건축비	66,200	66,200	51,441	3,901	10,858
장비비	41,000	41,000	13,485	4,937	22,578
운영비	51,600	51,600	-	-	51,600
S/W사업	82,800	82,800	-	-	82,800

※ 시비부담분 6,050백만원(‘14년 5,000, ’15년 1,050) 미확보

◦ 사업내용

▸H/W사업 6개시설 건축(부지면적 52,675㎡, 연면적 28,705㎡-지하1층, 지상5층)

▸S/W사업 10개사업(식품산업화 R&D지원, 기능성식품개발 및 육성 등)

□ 추 진 계 획

◦ 정부기업지원시설 공사 추진(계속)                :  2014.  5월 ~

▸공사 준공 – 2016. 12월

◦ 정부기업지원시설 임시연구소 운영                :  2014. 10월 ~

▸임시연구소 장비구축 및 운영 : 원광대, 전북대 익산캠퍼스(2015.1월)

□ 기 대 효 과

◦ 입주기업 원스톱 지원을 위한 3대 R&D시설 등 지원시설 건립으로 국가 식품클러스터 경쟁력 강화 기반 마련

4		국가식품클러스터 배후복합도시 조성

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2014 ~ 2018년(5년)

◦ 위    치 : 국가식품클러스터 산업단지 인근

◦ 총사업비 : 2,503억원(보상비 732, 공사비 1,431, 기타 340)

◦ 사업내용 : 배후복합도시 조성 119만㎡(36만평)

▸한옥단지, 외국인 맞춤형 주거단지, 체험관․박물관 등

◦ 개발방식 : 도시개발사업

□ 쟁점 및 애로사항

◦ 개발여건 미성숙 및 건설경기 침체로 사업참여 희망업체 부재

▸배후복합도시 리스크 저감을 위한「선택과 집중」으로 단계적 개발 필요

- 1단계 조기 활성화로 수요유발 및 추진동력 확보

□ 추 진 계 획

◦ 배후복합도시 건설사업 사업시행자 선정을 위한 관계기관 참여 유도

▸LH공사, 전북개발공사, 한국농어촌공사 등에 개발 위․수탁 협의

◦ 사업시행자 선정 후 단계별 추진방안 검토(조성 가능한 면적 등)

□ 기 대 효 과

◦ 친환경 문화․관광․레저 기능이 융․복합된 고품격 배후도시 건설로 안정된 정주 공간 제공 및 기업 투자유치 유도

5		국가식품클러스터 투자유치 및 교류협력

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 2015. 1월 ~ 12월

◦ 사업추진 : 국가식품클러스터 지원센터

◦ 사 업 비 : 6,784백만원(국 3,392 / 도 1,018 / 시 2,374)

◦ 사업내용

▸지원센터 운영, 국내‧외 투자유치(민‧관) 및 홍보

▸국내‧외 투자유치관 운영 및 투자유치 전략회의 운영

▸투자유치 네트워크 활동 및 국제식품클러스터포럼 개최

▸국제식품공동R&D지원사업, R&D네트워크 구축, 임시연구소 운영

□ 추 진 계 획

◦ 지원센터 및 홍보관 운영, 국내‧외 투자유치단 활동

◦ 투자유치 네트워크 활동 및 제5회 국제식품클러스터포럼 개최

◦ 입주예정 및 잠재투자기업 대상 기업설명회 개최

◦ MOU 체결업체 입주계약 체결

◦ 국내‧외 기업 1:1 투자유치 활동 강화

◦ 기업‧연구소‧대학 공동 R&D사업         : 1건 / 전북대(3년차)

◦ 임시연구소 활용 공동연구과제 수행

□ 기 대 효 과

◦ 국내‧외 유수의 식품기업 및 기관‧연구소에 대한 투자유치 강화

◦ 교류협력을 통해 국가식품클러스터를 아시아 식품시장의 허브로 육성

6		국가식품클러스터 외국인투자지역 지정

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2015년 ~

◦ 위    치 : 국가식품클러스터 글로벌식품존內

◦ 지정목표 : 450,000㎡(13.6만평) / 30개기업

◦ 우선추진 : 210,064㎡(6.3만평)

※ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2015년	2016년	2017년이후	비 고
계	32,501.0	3,250.1		29,250.9
국 비	19,175.7	1,625.1		17,550.6	60%
도 비	3,997.6	487.5		3,510.1	12%
시 비	9,327.7	1,137.5		8,190.2	28%

※ 450,000㎡지정할 경우 : 69,621.8백만원(국 41,076.8 도8,563.5 시19,981.5)

□ 추 진 계 획

◦ 외국인투자지역 지정신청(도⇒산업통상자원부)      : 2014. 12. 24

◦ 외국인투자지역 지정검토 및 지정(산업통상자원부)  : 2015. 1월~5월

◦ 외국인 투자기업 입주 및 공장가동                : 2017. 1월 ~

□ 기 대 효 과

◦ 산업단지 준공에 앞서 외국인투자지역을 지정하여 거대 동북아 식품

시장의 선점기반 마련

◦ 글로벌 식품기업 및 연구소의 투자유치 활성화 촉진에 기여