2015.  6.

제185회 익산시의회(임시회)

― 2015 주요업무 보고 ―

상반기 결산 및 하반기 추진계획

건설교통국

보 고 순 서

□	일반현황	………	3
□	도시개발과	………	9
□	건설과	………	31
□	주택과	………	55
□	교통행정과	………	75
□	도로관리과	………	97
□	차량등록사업소	………	117

일  반  현  황

□ 기구 및 정․현원

◦ 기    구  …………………………………………………  5 과 1 사업소

																		건설교통국
																															`
도시개발과										건 설 과										주 택 과											교통행정과									도로관리과										차량등록 사 업 소
도시행정		도시계획		도 시 개 발			도시재생	도 시 경 관		건설행정	도로시설		하천시설		하천관리		가로등관리			주택행정		주택관리		주거복지	건축민원	건축물관리	공공시설				교통행정	교통물류		교통관리			교통지도			도로행정		도로관리			도로기반		가로정비			관리	등록

◦ 정․현원

(정원 / 현원)

구 분	정원	현원	직 급 별
			3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	계약
계	148	141		1 1	6 6	35 34	45 59	33 28	28 11	0 2
도시개발과	25	23		1 1	1 1	7 7	6 5	7 6	3 3
건설과	24	22			1 1	6 5	9 8	7 8	1 0
주택과	32	30			1 1	7 9	12 14	9 2	3 2	0 2
교통행정과	24	24			1 1	6 5	6 13	4 4	7 1
도로관리과	27	26			1 1	6 6	8 9	2 6	10 4
차량등록사업소	16	16			1 1	3 2	4 10	4 2	4 1

□ 부서별 주요업무

부 서	주 요 업 무
도시개발과	∙도시기본계획 수립, 도시계획시설 결정 및 변경, 지구단위계획 수립 ∙도시계획도로 개설, 자전거도로 계획수립 및 시행, 개발행위 허가 ∙도시 취약지역 생활여건 개조사업, 도시재생사업 ∙기본경관계획 및 특정경관계획수립, 경관가이드라인 수립, 사전경관협의제 운영
건설과	∙국 소관사업 및 유관기관 용지매입, 토지수용 재결 ∙철도건널목 개량사업, 시․군도, 농어촌도로 확․포장사업 ∙하천 기본계획 수립, 지방하천 개량사업, 소하천 정비사업 ∙하천제방관리, 골재채취허가, 하천사용료 징수부과, 생태하천관리 ∙가로등․보안등 시설 종합계획, 유지보수관리, 생활민원
주택과	∙불법건축물 지도단속, 건축물 부설주차장 관리, 저소득임대보증금지원 ∙주택건설사업 계획승인, 공동․임대주택관리, 도시주거환경 개선사업 ∙농촌주거환경 개선사업, 건축허가 및 신고, 공공청사 건축공사 감독
교통행정과	∙교통체계 개선을 위한 교통안전시설물 확충 ∙어린이보호구역 개선사업 ∙대중교통 활성화 및 교통편익증진 ∙운수업체등 지도․단속 및 교통질서 확립 유도 ∙불법 주․정차 단속, 과태료 부과, 주․정차 금지 및 견인구역 지정
도로관리과	∙도로, 인도, 교량 유지관리 및 긴급 도로보수 운영관리 ∙도로혼잡 구간 개선사업 ∙주민숙원사업, 교통사고 많은 지점 개선사업 ∙불법광고물․노점상․노상적치물 정비로 쾌적한 가로환경 조성
차량등록사업소	∙자동차등록, 자동자 저당, 압류, 말소, 해제, 자동차 정기검사 ∙자동차관리법 위반 및 책임보험 과태료 부과, 징수 등 ∙건설기계 등록, 건설기계 면허증 발급, 이륜자동차 신고 및 관리

□ 국토의 용도구분

◦ 행     정     구     역  :  506.925㎢

▸도시지역   --------------------------------    76.091㎢(행정구역의 15.0%)

□주거지역 : 17.835㎢          □상업지역 :  1.870㎢

□공업지역 : 10.558㎢          □녹지지역 : 45.828㎢

▸관리지역   --------------------------------  214.809㎢(42.4%)

□계획 90.979㎢, 생산 75.446㎢, 보전 48.385㎢

▸농림지역   --------------------------------  194.046㎢(38.3%)

▸자연환경보전지역   --------------------   21.979㎢( 4.3%)

□ 도로․하천 현황

◦ 도  로 : 총연장 1,419.8㎞    포장연장 876.5㎞ (포장율 61.7%)

▸고속․일반국도  94.9㎞/88.4㎞(93.2%),  지방 162.7㎞/141.3㎞(86.8%)

▸시․군도  640.2㎞/460.4㎞(71.9%),  농어촌도로  552㎞/186.4㎞(35.7%)

◦ 하  천 : 총 304.7㎞   89개소(개수율 52.8%)

▸국가하천 34.2㎞(100%), 지방하천 172.0㎞(51%), 소하천 98.5㎞(40%)

□ 주 택 현 황

○ 주택수 128,489호/주택 총가구수 109,391호(주택보급율 117.46%)

▸단  독 53,458(41.6%) ▸아파트 69,614(54.2%) ▸연  립 3,073(2.4%)

▸다세대 2,344(1.8%)

□ 차량등록 현황

◦ 총 등록대수 : 148,475대(자동차 129,445 , 건설기계 4,310 , 이륜차 14,720)

▸자 동 차  :  129,445대

- 승  용  :   96,087대 (자가용 93,715   영업용 2,251  관용 121)

- 승  합  :     6,291대 (자가용  5,580   영업용   622  관용  89)

- 화  물  :   27,067대 (자가용 23,887  영업용 2,970  관용 210)

▸건설기계  :     4,310대 (자가용  3,001  영업용  1,279   관용  30)

▸이륜자동차  :   14,720대 (자가용 14,583 관용 137)

□ 운수업체 현황

◦ 합    계  :     255개업체  5,015대

▸버  스  :  시내    3개업체    164대   전세 11개업체  364대

▸택  시  :  회사   14개업체    477대   개인         1,015대

▸용  달  :  회사    5개업체     17대   개인           433대

▸화  물  :  일반 214개업체  1,904대   개별           626대

▸장의차  :          8개업체    15대

□ 2015 예산집행실적

【 2015. 5. 22. 현재 】                                       (단위 : 천원)

구 분	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
계	85,860,533	30,310,110	55,551,423	35.3
도시개발과	22,383,601	7,166,505	15,217,096	32.0
건설과	14,760,614	4,942,651	9,818,963	33.4
주택과	15,426,967	5,711,631	9,715,336	37.0
교통행정과	27,861,721	10,987,166	16,874,555	39.4
도로관리과	5,183,507	1,382,525	3,800,982	26.7
차량등록사업소	244,123	119,632	124,491	49.0

도시개발과

□	비전 및 중점과제
□	일 반 현 황
□	2015 예 산 집 행 실 적
□	2015 상반기 성과 및 반성
□	2015 주 요 업 무 추진상황

도시개발과 비전과 중점과제

	비 전
이천년 역사고도 녹색도시 익산건설을 위한 지속가능한 도시계획과 개발 및 관리

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	미래지향적인 도시계획수립 인간과 환경을 중시하는 도시개발사업 추진 시민중심의 도시문제 해소

일   반   현   황

□ 기     구

										도 시 개 발 과
도시행정								도시계획				도시개발				도시재생							도시경관

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별							비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	계약
정 원	25	1	1	7	6	7	3
현 원	23	1	1	7	5	6	3
증 감	△2				△1	△1

□ 사 무 분 장

◦ 도시행정  :  국․과․소 행정 종합기획 및 예산편성, 개발행위 허가

◦ 도시계획  :  도시기본계획 및 도시관리계획 수립, 도시계획 시설결정

◦ 도시개발  :  도시계획 도로사업, 자전거도로 계획수립 및 시행

◦ 도시재생  :  도시 취약지역 생활여건 개조사업,  도시재생사업

◦ 도시경관  :  기본경관계획 및 특정경관계획수립, 경관가이드라인 수립

□ 국토의 용도구분

(단위 : ㎢, %)

구 분	총 면 적	고 시 면 적				비 고
		도시지역	관 리 지 역	농림지역	자연환경 보존지역
면 적	506.925	76.091	214.809	194.046	21.979
비 율	100	15.0	42.4	38.3	4.3

□ 도시지역내 용도지역

(단위 : ㎢, %)

구 분	계	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	비고
면 적	76.091	17.835	1.870	10.558	45.828
비 율	100	23.4	2.5	13.9	60.2

□ 도시지역내 용도지구

(단위 : 천㎡)

지구명	계	미관지구	경관지구	방화지구	고도지구	자연취락 지 구	문화자원 보존지구	비 고
지구수	135	29	3	9	10	83	1
면 적	20,261	2,478	12,680	1,180	985	2,736	202

□ 도시계획시설 결정 및 집행현황

(단위 : 천㎡, %)

시설명		시설결정		집행시설		미집행시설		집행률
		개소	면적	개소	면적	개소	면적	(%)
총 계		2,129	32,099	1,641	26,057	488	6,042	81.2
도로	소 계	1,571	12,635	1,126	11,256	445	1,379	89.1
	광 로	6	1,249	3	1,151	3	98	92.2
	대 로	68	4,172	43	3,797	25	375	91.0
	중 로	360	4,520	292	4,115	68	405	91.0
	소 로	1,137	2,694	788	2,193	349	501	81.4
공원	소 계	98	5,791	77	1,794	21	3,997	31.0
	근린공원	47	5,160	29	1,380	18	3,780	26.7
	어린이공원	38	88	38	88	-		100.0
	소 공 원	7	34	7	34	-		100.0
	역사공원	2	77	1	51	1	26	66.2
	문화공원	1	35	1	35	-		100.0
	수변공원	2	28	1	8	1	20	28.6
	묘지공원	1	369	(1)	198	1	171	53.7
녹지	소 계	91	1,134	77	523	14	611	46.1
	완충녹지	75	1,072	62	465	13	607	43.4
	경관녹지	12	56	11	52	1	4	92.9
	연결녹지	4	6	4	6	-		100.0
기타	소 계	369	12,539	361	12,484	8	55	99.6
	주차장	49	149	49	149	-		100.0
	광 장	32	678	26	663	6	15	97.8
	공공청사	14	189	14	189	-		100.0
	유원지	1	31	-		1	31	0.0
	운동장	1	260	(1)	251	1	9	96.5
	기 타	272	11,232	272	11,232	-		100.0

2015 예산집행실적

【 2015. 5. 22. 현재 】                                        (단위 : 천원)

부서	정책	단위		세 부 사 업		예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
도시개발과						22,383,601	7,166,505	15,217,096	32.01
	도시개발관리					21,507,483	7,081,148	14,426,335	32.92
		도시계획				665,557	165,715	499,842	24.89
				KTX익산역복합환승 센터개발사업		370,000	122,802	247,198	33.18
					일반운영비	70,000	1,011	68,989	1.44
					시설비	300,000	121,791	178,209	40.59	명시이월
				도시계획관리		200,451	34,263	166,188	17.09
					일반운영비	41,381	12,263	29,118	29.63
					국내여비	38,640	17,000	21,640	43.99
					시책추진 업부추진비	9,800	5,000	4,800	51.02
					시설비	110,630	-	110,630	0	명시이월
				구도심활성화사업		16,400	8,650	7,750	52.74
					일반운영비	12,250	6,000	6,250	48.97
					국내여비	500	500	0	100
					국제화여비	2,150	2,150	0	100
					재료비	1,500	-	1,500	0
				중앙동특화거리 (상징거리)조성사업		78,706	-	78,706	0	계속비
		도시계획도로개설 (대로)				18,356,055	6,048,019	12,308,036	32.94
			산업도로개설			1,383,508	154,560	1,228,948	11.17	계속비
			목천동원주A～우석장례예식장간도로확장			659,728	133,999	525,729	20.31	사고이월
			도농연결도로개설			10,103	-	10,103	0	계속비
			안전한보행환경조성사업			420,000	174,383	245,617	41.51	명시이월
			KTX서부역사진입로확장사업			15,882,716	5,585,077	10,297,639	35.16	명시이월
		도시계획도로개설 (중로)				315,101	136,587	178,514	43.34
			석방육교~도축장간도로개설			279,910	136,587	143,323	48.79	사고이월
			춘포면사무소~춘포역간도로개설			35,191	-	35,191	0	명시이월

부서	정책	단위		세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
		도시계획도로개설 (소로)			968,877	235,071	733,806	24.26
				어양동 부천초교옆도로개설	192,500	0	192,500	0	명시이월
				영등동보람주유소~은혜교회간도로개설	108,112	0	108,112	0	명시이월
				함열 미력리(소로1류8호) 도로개설	30,000	0	30,000	0
				미불용지보상	328,265	212,105	116,160	64.61	명시이월
				구)남중2가동사무소 앞 도로개설	150,000	0	150,000	0
				소라산~영등소라성당간 도로개설	20,000	17,360	2,640	86.8
				영등동 은혜교회옆 도로개설	140,000	5,606	134,,394	4
		신규도시개발사업			578,000	150,458	427,542	26.03
				마동EG@앞도로개설	450,000	136,068	313,932	30.23	명시이월
				모현동E편한세상도로개설	128,000	14,390	113,610	11.24
		자전거도로이용시설활성화사업			1,000	0	1,000	0
				자전거도로정비	1,000	0	1,000	0
	도시경관디자인관리				361,799	94,942	266,857	26.24
		도시경관디자인조성			361,799	94,942	266,857	26.24
			도시디자인		17,200	3,203	13,997	18.61
			여성친화형공공디자인개선사업		307,099	85,789	221,310	27.93	명시이월
			국토환경디자인		37,500	5,950	31,550	15.86
	재무활동				230,000	230,000	0	100
			기타회계전출금		230,000	230,000	0	100
	행정운영경비				31,094	20,356	10,738	65.46
			일반운영비		22,254	15,426	6,828	69.31
			업무추진비		6,840	3,040	3,800	44.44
			자산취득비		2,000	1,890	110	94.50
	특별회계				876,118	85,357	790,761	9.74
		남부지구정비사업			642,265	42,150	600,115	6.56
		장기미집행도시계획			233,853	43,207	190,646	18.47

2015 상반기 성과 및 반성

□ 성      과

◦ 대통령직속 지역발전위원회 도시 취약지역 생활여건 개조사업 공모 선정

▸ KTX익산역 철도관사 주변지구 : 최대100억원(국비 70, 도비 9, 시비 21)

◦ 2015전라북도 경관디자인 시범사업 공모 선정

▸ KTX익산역 주변 가로환경 안전디자인 개선사업  :  740백만원 (도비 370, 시비 370)

◦ 2015~2016 국토교통부 도시디자인 민간전문가 활용 지원사업 공모 선정

▸ 민간전문가 자문 등 지원예산  : 50백만원 (국비 37.5, 시비 12.5)

◦ 2013~2014 전라북도 경관디자인 시범사업 완료 : 748백만원 (도비 373,시비 375)

▸ 시청사 주변 커뮤니티공공디자인 개선사업 : 2013. 7 ~ 2015. 1

▸ 시청~상공회의소 사거리 가로환경 개선사업 : 2015. 4 ~ 6.

□ 반      성

◦ 추진중인 도시계획 도로사업 장기간 지연되고 있어 예산의 선택과 집중을 통한 마무리 위주의 사업추진 필요

2015 주요업무 추진상황

		KTX역세권종합개발계획수립용역 장기미집행 도시계획시설 재검토 KTX서부역사진입로확장공사 산업도로(대로1-2호)확장공사 선화로안전한보행환경조성사업 구)남중2가동사무소 앞 도로개설 마동EG아파트 앞 도로개설 취약지구 생활여건 개선사업

1		익산 KTX 역세권 종합기본계획 수립 용역 (도시재생 전략계획수립 포함)

□ 사 업 개 요

◦ 용역내용

▸ 익산역 반경 500m 역세권 종합기본계획 수립

▸ 익산시 전역에 대한 도시재생전략계획 수립

◦ 용역기간 : 2014. 11. 20 ~ 2015. 11. 19 (착수일로부터 12개월)

◦ 용 역 비 : 243,584천원

◦ 용 역 사 : ㈜주한건설기술단 컨소시엄((사)대한국토․도시계획학회)

□ 상반기 추진실적

◦ 용역 착수	2014. 11. 20.

◦ 착수보고회 개최	2015. 01. 20.

◦ 도시재생 활성화 및 지원에 관한 조례 제정	2015. 02. 27.

◦ 중간보고회 개최	2015. 04. 10.

□ 하반기 추진계획

◦ 도시재생활성화계획 용역비 추경반영(1.5억)	2015. 06.

◦ 주민공청회 및 지방의회 의견청취	2015. 08. ~ 09.

◦ 도시재생전략계획 승인(전북도)	2015. 10. ~ 11.

◦ 도시재생활성화계획 추진	2015. 09. ~ 2016. 04.

◦ 국비지원 신청(국토교통부)	2016. 05. ~ 2016. 12.

◦ 도시재생사업 추진(1단계, 5개년)	2017. 01. ~ 2021. 12.

2		장기미집행 도시계획시설 재검토

□ 사 업 개 요

◦ 목     적

▸ 장기미집행 도시계획시설에 대한 전반적 재검토를 통해 일몰제에 사전 대비하고자 함

- 장기미집행 도시계획시설 일몰제 : 도시계획시설 결정후(2000.7기산) 20년 이상  미집행된 도시계획시설은 2020년부터 자동 해제되는 제도

◦ 대상시설

▸ 총 2,129개 도시계획시설중 도로, 공원 등 미집행 도시계획시설 488개 시설(총 32,099천㎡, 집행 26,057천㎡, 미집행 6,042천㎡ / 미집행률 18.8%)

◦ 용 역 비 : 131백만원

◦ 기    간 : 2014. 5. ~ 2015. 12.

◦ 주요내용

▸ 도시계획시설 기능 및 필요성, 재정여건 등을 감안한 재검토

▸ 존치하고자 검토된 도시계획시설은 단계별 집행계획수립

▸ 의회 장기미집행 도시계획시설 현황보고

□ 상반기 추진실적

◦ 현황조사 및 기초자료 분석	2014.  5 ~  9

◦ 국토부 장기미집행 해제 가이드라인 T/F팀 참여	2014. 10 ~ 12

◦ 국토부 가이드라인 적용 검토기준 작성	2015.  1 ~  3

◦ 유형별 세부기준 검토	2015.  3 ~  6

□ 하반기 추진계획

◦ 주민의견청취	2015.  7 ~  8

◦ 단계별 집행계획 수립	2015.  8 ~  9

◦ 장기미집행시설 의회보고	2015.  9 ~ 10

◦ 도시관리계획 변경도서 작성	2015. 10 ~ 12

◦ 도시관리계획 변경 추진	2016년 이후

3		KTX 서부역사 진입로 확장공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 송학동ㆍ모현동 일원

◦ 사업규모 : L=500m , B=25⇒50m(광로2류3호)

▸ 지하차도 : 293m, 일반도로 : 207m

◦ 사업기간 : 2014. 11 ~ 2016. 9

◦ 총사업비 : 46,500백만원 (공사비 27,500ㆍ보상비 19,000)

▸ 2015년도 예산 : 1,560백만원 (2014년까지 30,000)

▸ 년도별 투자계획                                   (단위 : 백만원)

구분	총 계	~2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년~
총계	46,500				30,000	1,560	14,940
국비 (시설부담금)	21,940				11,000		10,940
시비	24,560				19,000	1,560	4,000

□ 상반기 추진실적

◦ 공사 및 감리 착공(1차분)	2014. 11. 18

◦ 지방토지수용위원회 개최(토지 13필지, 물건9건)	2015. 01. 08

◦ 소유권 이전등기 및 공탁(군산지원 : 1,987백만원)	2015. 02. 25

◦ 모현·송학동 주민설명회 2회 개최 (50명 참석)	2015. 03. 05

◦ 지장건물 철거 (39동중 37동 철거완료)	2015. 04. 18

◦ 지장전주, 가로수, 상·하수도 이설 완료	2015. 05. 30

* 현 공정 : 15%  (H파일 및 가시설(토류판) 설치중)

□ 하반기 추진계획

◦ 잔여 지장물 철거 (2동 : 명도소송 진행중 )	2015. 07.

◦ 공정계획에 의거 공사 추진	2015. 07. ∼ 12.

▸ 지하차도 Box· U–type  구조물 시공

4		산업도로(대로1-2호) 확장공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 팔봉 인디안매장 ~ 덕기동 현대주유소

◦ 사업규모 : L=2,516m , B=20⇒35m(대로1류2호) 확장

◦ 사업기간 : 2008. 4 ~ 2016. 12

◦ 총사업비 : 11,019백만원 (공사비 6,232ㆍ보상비 4,787)

▸ 2015년도 예산 : 1,500백만원 (2014년까지 7,113)

▸ 년도별 투자계획                                   (단위 : 백만원)

구분	총 계	~2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년~
총계	11,019	5,032	1,488	201	392	1,500	2,406
국비	4,232	3,732				500
시비	6,787	1,300	1,488	201	392	1,000	2,406

□ 상반기 추진실적

◦ 공사추진 ( 5차분 L=634m)	2015. 3. ~ 6.

▸ 토공 및 옹벽시공

▸ 배수시설 및 상수관로부설

▸ 오씨문중 묘지 이설(4기)

□ 하반기 추진계획

◦ 공사추진 ( 5차분 잔여공정)	2015. 6. ~ 10.

▸ 보도블럭설치(L=582m)

▸ 기층포설(140a)

5		선화로 안전한 보행환경 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 중앙체육공원 ~ 2공단 사거리

◦ 사업규모 : L=1,260m , B=20⇒35m(대로1류5호) 확장

◦ 사업기간 : 2010. 1. ~ 2016. 12

◦ 총사업비 : 9,770백만원 (공사비 4,430ㆍ보상비 5,340)

▸ 2015년도 예산 : 300백만원 (2014년까지 7,020)

▸ 년도별 투자계획                                   (단위 : 백만원)

구분	총 계	~2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년~
총계	9,770	5,009	1,591	300	120	300	2,450
국비	3,300	3,206	94
시비	6,470	1,803	1,497	300	120	300	2,450

▸ 용지보상 : 총 77필지 12,645㎡중 67필지 9,649㎡ 보상(76%) 완료

□ 상반기 추진실적

◦ 공사완료(4차분 L=690m)	2015. 4. ~ 6.

▸ 상수관로 및 하수도관 부설, 보강토옹벽설치

□ 하반기 추진계획

◦ 5차분 도로확장공사	2015. 7. ~ 10.

▸ 공사추진 (L=300m) : 보강토 옹벽설치, 보도블럭포설 등

- 추경 5억 예산요구

6		구)남중2가동사무소 앞 도로개설공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 남중동 일원

◦ 사업규모 : L=60m , B=6m⇒8m(총 180m중 병목구간 60m)

◦ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2015. 12.

◦ 총사업비 : 150백만원 (공사비 50ㆍ보상비 100)

▸ 2015년도 예산 : 150백만원

□ 상반기 추진실적

◦ 실시설계 용역완료	2015. 5.

◦ 분할측량실시	2015. 5.

◦ 편입토지 감정평가실시	2015. 5.

◦ 토지 및 지장물 보상추진	2015. 5. ~  6.

□ 하반기 추진계획

◦ 지장물 철거공사 추진	2015. 7.

◦ 공사추진	2015. 7. ~ 12.

7		마동 EG아파트 앞 도로개설공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 마동 EG아파트 앞 일원

◦ 사업규모 : L=50m , B=6⇒15m(소로3류324호)

◦ 사업기간 : 2013. 1. ~ 2015. 12.

◦ 총사업비 : 700백만원 (공사비 80ㆍ보상비 620)

▸ 2015년도 예산 : 350백만원 (2014년까지 350)

▸ 년도별 투자계획                                  (단위 : 백만원)

구분	총 계	~2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년~
총계	700			250	100	350
국비
시비	700			250	100	350

□ 상반기 추진실적

◦ 도시계획시설(변경) 결정	2015. 2. 13

◦ 실시설계용역완료	2015. 2. 26

◦ 실시계획인가고시	2015. 3. 24

◦ 공사착공	2015. 4. 23

◦ 건설폐기물처리용역착공	2015. 4. 29

◦ 편입토지 및 지장물 보상(82%)	2015.  1. ~  6.

▸ 8필지 1,170㎡중 6필지 967㎡

▸ 건물 2동 중 1동(이숙자)보상완료

□ 하반기 추진계획

◦ 지장물 철거 및 공사추진	2015. 6. ~ 12.

8		취약지역 생활여건 개조사업

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 명 : 도시 취약지역 생활여건 개조사업(KTX 익산역 주변지구)

◦ 사업기간 : 2015년 ~ 2018년

◦ 사업내용 : 기초인프라정비사업, 집수리 지원사업, 마을공동체 지원사업등

◦ 시행기관 : 익산시(국고보조사업)

◦ 총사업비 : 최대100억원(국비 70, 도비 9, 시비 21)

□ 상반기 추진실적

◦ 공모사업 신청서 제출	2015. 01. 28.

◦ 공모사업 현장실사(지역발전위원회, 기획재정부, 국토교통부)	2015. 03. 09.

◦ 공모사업 선정 발표(익산시 선정)	2015. 03. 24.

◦ 사업선정에 따른 주민설명회 개최	2015. 04. 17.

◦ 사업조정을 위한 현장실사(지역발전위원회, 국토교통부, LH)	2015. 04. 28.

□ 하반기 추진계획

◦ 마스터플랜 용역 발주	2015. 07.

◦ 우선시행사업 검토 및 착수	2015. 07. ~ 12.

◦ 마스터플랜 용역 완료(사업예산 확정)	2015. 12.

◦ 단위사업별 공사 추진	2016. 01. ~ 2018. 12.