2015.  6.

제185회 익산시의회(임시회)

― 2015 주요업무 보고 ―

상반기 결산 및 하반기 추진계획

건설교통국

보 고 순 서

□	일반현황	………	3
□	도시개발과	………	9
□	건설과	………	31
□	주택과	………	55
□	교통행정과	………	75
□	도로관리과	………	97
□	차량등록사업소	………	117

건설과

□	비전 및 중점과제
□	일 반 현 황
□	2015 예 산 집 행 실 적
□	2015 상반기 성과 및 반성
□	2015 주 요 업 무 추진상황
□	특수시책

건설과 비전과 중점과제

	목 표
아름답고 깨끗한 녹색도시 건설

		중 점 추 진 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	시민에게 다가서는 보상행정으로 양질의 서비스를 제공 도·농균형발전 및 거점개발 추진을 위한 도로시설 확충 환경을 우선으로 하는 생태하천조성으로 시민휴식공간 제공 장애인과 여성들을 배려한 시민중심의 밝고 안전한 거리조성

일   반   현   황

□ 기       구

											건 설 과
건설행정								도로시설					하천시설				하천관리							가로등관리

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별							비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	계약
정 원	24		1	6	9	7	1
현 원	22		1	5	8	8	0
증 감	△2			△1	△1	+1	△1

□ 사 무 분 장

◦건설행정  : 국 소관사업 및 유관기관 용지매입, 토지수용 재결,

소유권이전 촉탁 및 상속등기, 기타 보상관련 업무전반.

◦도로시설  : 철도건널목 개량사업, 고속국도, 국도, 지방도 등 사업

관련협의 시․군도, 농어촌도로 확․포장사업 추진.

◦하천시설  : 하천 기본계획 수립, 지방하천 개량사업, 소하천 정비사업

◦하천관리  : 하천제방관리, 골재채취허가, 하천사용료 징수부과, 생태하천관리

◦가로등관리  : 가로등․보안등 시설 종합계획, 유지보수관리, 생활민원.

□ 하 천 현 황

(단위:km)

구 분	총 연 장		하천정비기본계획수 립 현 황		정비대상	개수연장	미개수 연 장	개수율
	개 소	연 장	개 소	연 장
합 계	89	304.7	79	268.4	304.7	161	143.7	52.8%
국가하천	3	34.2	3	34.2	34.2	34.2		100%
지방하천	28	172.0	19	135.7	172.0	87.1	84.9	51%
소 하 천	58	98.5	58	98.5	98.5	39.7	59.8	40%

□ 하 천 점 용 허 가 현황(2015년)

필 지 수				면 적(㎡)
계	답	전	대지	계	답	전	대지
1,358	996	323	73	1,468,093	1,188,878	265,485	13,730

□ 가로등․보안등 현황

계	보 안 등	가 로 등
27,301등	18,045등	9,256등

□ 차량보유현황

가로등유지보수차량	하천관리차량
고가사다리차 3대	91러7428 더블캡 1대, 오토바이 1대

2015 상반기예산집행실적

【 2015. 5. 22. 현재 】 ※(본예산13,155백만원,이월1,557백만원, 추경성립전48백만원)   (단위: 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
건설과				14,760,614	4,942,651	9,818,963	33.4
	도로시설관리			8,165,285	3,961,943	4,203,342	49.0
		시·군도농어촌도로확·포장		2,498,395	387,525	2,110,870	15.5
			함라수동-금곡간 도로확·포장	361,931	15,192	346,739	4.2	명시이월
			용동 삼정-두무간 도로확·포장	100,000	0	100,000	0
			미불용지 매입비 (시군도농어촌도로)	100,000	34,040	65,960	34.0
			여산신리호월간 도로확·포장	539,286	19,515	519,771	4.0	명시이월
			오산북영선(금몽-남전 도로확포장	457,044	0	457,044	0
			성당삼회선(성당우회도로)확포장	700,132	83,562	616,570	12.0	명시이월
			황등부평마을 주민 휴식공간 조성사업	40,000	36,938	3,062	92.3
			중앙사거리 교통개선사업	200,000	198,277	1,723	99.1
		주민숙원사업		41,120	15,720	25,400	38.2
			국내여비	40,320	15,207	25,113	38
			시책추진업무추진비	800	513	287	64
		철도건널목입체화사업		2,549,000	2,547,780	1,220	99.9
			황등지구철도건널목입체화사업	2,549,000	2,547,780	1,220	99.9	계속사업
		교통관리개선사업		170,000	2,909	167,091	1.7
			위험도로개선사업	170,000	2,909	167,091	1.7	계속사업
		도로조명시설관리		2,906,770	1,008,011	1,898,759	35.0
			보안등신규설치	200,600	55,494	145,106	28.0	명시이월
			노후가로등정비	169,000	59,298	109,702	35
			가로등,보안등 유지관리	2,467,702	887,219	1,580,483	36.0

2015 상반기예산집행실적

【 2015. 5. 22. 현재 】                                       (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
			가로등보수차량 운영유지비	21,468	6,000	15,468	28.0
			주민편익증진사업(도비)	48,000	0	48,000	0	추경성립전예산
	하천정비			6,532,826	954,690	5,578,136	15.0
		하천정비 및 유지관리		6,532,826	954,690	5,578,136	15.0
			하천제방유지 보수(자체)	40,279	3,330	36,949	8.2	명시이월
			하천제방유지보수	102,000	0	102,000	0
			소하천정비	2,649,565	660,629	1,988,936	25.0	명시이월
			산북천하천 환경정비사업	2,435,369	215,180	2,220,189	9.0	게속사업
			지방하천기본계획 수립	180,000	52,509	127,491	29.1
			국가하천유지관리	325,612	23,041	302,571	7.1	명시이월
			왕궁천하천환경 정비사업	800,000	0	800,000	0
	행정운영경비			62,502	26,017	36,485	42.0
			인력운영비	35,000	12,117	22,883	35.0
			기본경비	27,502	13,900	13,602	51.0

2015 상반기 성과 및 반성

□ 성      과

◦ 건설공사 편입용지 협의보상으로 공익사업 추진에 기여

▸사업지구 28개소(계속사업 19개소, 신규사업 9개소) 62% 협의

▸KTX역사 진입로 미협의자의 보상금 공탁

◦ 평화육교를 재가설하여 사고예방과 지역주민의 교통안전 및 주민편익         증진에 기여

▸평화육교 재가설 사업비(307억원) 승인(기재부) : 2015년 4. 6.

◦ 자연과 생명이 살아 숨쉬는 친환경을 우선으로 하는 하천 정비로        재해예방 및 시민 친수공간 조성

▸ 산북천 하천환경정비사업

- 교량 1개소(L=65m, B=7.0m) , 자연석 쌓기 21,722㎡중 21,722㎡             제방정비  12.7km 중  12.1㎞ )

▸ 소하천 정비사업

- 신평천 : 제방축조 0.7㎞중 0.3㎞ 완료

- 오동정천 : 토지매입협의(57필지/16,405㎡ 중 12필지/4,876㎡ 매입)

- 외산천 : 1차분 착공

◦ 도로조명설치로 밝은거리 조성하여 여성,노약자 등에게 안전한 보행 도모

▸ 노후가로등정비 160개소,  보안등 신규설치 389개소

▸ 가로등,보안등 민원처리 1,116건

2015 주요업무계획

	□	공익사업을 위한 용지보상 평화육교 재가설사업 황등철도건널목 입체화사업 시․군도 농어촌도로 확․포장사업 하천환경정비사업(산북천,왕궁천)소하천정비사업(신평천,오동정천,외산천) 하천기본계획(대조천,소하천정비) 국가하천유지관리사업 도로조명시설조도개선

1		공익사업을 위한 용지보상

□ 현      황

구분	보상대상			보상실적				미보상 토지
	개소	필지	면적	개소	필지	면적	비율	개소	필지	면적
계	28	1,603	444,954	28	990	244,612	55%	28	613	200,342
도시개발과	12	374	70,949	12	284	41,892	59%	12	90	29,057
건 설 과	10	619	156,451	10	415	92,127	59%	10	204	64,324
도로관리과	2	12	1,855	2	5	445	24%	2	7	1,410
시민안전과	3	74	18,468	3	18	4,497	24%	3	56	13,971
타 기 관	1	524	197,231	1	269	105,651	54%	1	255	91,580

※ 신규사업 9개소(도시개발과 2, 건설과 4, 도로관리과 1, 안전총괄과 2)

□ 추 진 계 획

◦ 보상계획 : 28개노선 618필지 - 204,150㎡(24,520백만원)

▸독려반 2개반 4명 편성운영하여 적극적인 보상업무 추진

▸협의기간내 미협의자 개별방문 및 면담으로 집중 독려

▸해당 사업자별 현지(읍․면․동) 출장 보상협의 및 계약체결

▸소액보상자, 노약자, 장애인 등 현지방문 보상민원 처리

▸원거리거주자(서울,경기등)왕복 우편이용 보상협의계약 대행처리

□ 기 대 효 과

◦ 시민에게 다가서는 보상행정으로 양질의 서비스를 제공하고

◦ 공익사업을 위한 적극 협의보상 도로망 확충으로 도시발전 기여

2		평화육교 재가설 사업

□ 사 업 개 요

◦ 위  치 : 익산시 평화동 255번지 일원(구, 국도 23호선 내)

◦ 개  요 : 육교 재가설 L=255m, B=35m(4차로⇒6차로 확장)

▸ 현재 교량 : L=195m, B=16.2m(4차로)

◦ 사업기간 : 2015 ~ 2018

◦ 사업비 :  497억원( 국비 307, 시비 190)

□ 상반기 추진실적

◦ 평화육교 재가설 건의                          :  2010 ~ 2014. 12

◦ 국비확보를 위한 방문협의(국토부, 기재부)        : 2015. 1 ~ 4

◦ 평화육교 재가설 총사업비 승인(기재부)          : 2015. 4. 6

▸ 한국철도시설공단의 호남고속철도 오송~광주(송정)간 총사업비중             평화육교 재가설에 307억원 사용토록 승인.

◦ 사업추진 방식 협의 중                         : 2015. 5 ~ 6.

□ 하반기 추진계획

◦ 사업추진 협약체결(익산시, 한국철도시설공단)    : 2015. 7 ~ 10.

▸ 사업계획등 상호협의, 협약서 체결 등

◦ 사업추진 추진                                 : 2016  ~ 2018. 12.

▸ 행정절차 및 토지 매입, 설계 및 공사 추진 등

▸ 호남고속철도 노반(선로 확장,  전기, 통신)공사와 병행시행

3		황등철도건널목 입체화사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 황등면 동연리, 황등리(황방·동연, 삼바레기 건널목)

◦ 사업규모 : L=0.95km, B=15m (지하차도 2개소 포함)

◦ 사업기간 : 2010 ~ 2015

◦ 사 업 비 : 28,352백만원(공단 21,264 익산시 7,088)

※ 2015년 예산확보액 : 2,549백만원

◦ 시행기관 : 한국철도시설공단(국가사업)

□ 상반기 추진실적

◦ 사업추진 협약체결(익산시, 한국철도시설공단)           : 2008. 9.

◦ 공사 시행 (1차 ~ 6차분)                    : 2010. 12. ~ 2015. 6.

‣ 전체분 공정율 : 95% (2015년 5월말 현재)

‣ 토공, 구조물 설치, 지하차도, 배수로 설치 등

‣ 도로교통시설물, 신호등, 포장공, 차선도색, 쌈지공원 2개소 설치 등

□  하반기 추진계획

◦ 공사 준공 및 도로개통식                          : 2015. 7월中

◦ 중간 정산금 예산확보                             : 2015. 7 ~ 12.

※ 중간정산 결과 추가예산 소요 : 약 15억원중 시 분담금 4억원(25%)

⇒ 사업은 정상추진하고 추경 또는 2016년 본예산 확보후 납부예정.

◦ 시설물 인수인계(철도시설공단⇒익산시)             : 2015. 7 ~ 12

4		시·군도 농어촌도로 확·포장사업

□  사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 여산면, 성당면, 용동면, 오산면

◦ 사업규모 : 공사 4건 (L=5.64km, B=8m)

◦ 사 업 비 : 1,100백만원 (4개사업)

▸ 여산 신리~호월간 도로확·포장공사            : 500백만원

▸ 성당 삼회선(성당우회도로) 도로확·포장공사    : 200백만원

▸ 용동 삼정~두무간 도로확·포장공사            : 100백만원

▸ 오산 북영선 도로확·포장공사                  : 300백만원

※ 추진중 사업(계속사업)

(단위 : 백만원)

노선수	사업량	총사업비	기투자	2015년	금후	비 고
20개	L=28.14㎞	38,053	7,899	1,100	29,054

□ 상반기 추진실적

◦ 여산 신리~호월간 도로확·포장공사

▸ 농지 및 산지전용 협의                         : 2015. 2 ~ 6.

▸ 공사 발주 (총괄) 및 착수                      : 2015. 6.

◦ 성당 삼회선(성당우회도로) 도로확·포장공사

▸ 감정평가 및 토지 매입  추진                   : 2015. 2 ~ 6.

- 총 54필지 20,061㎡중  9필지 1,341㎡ 매입 ( 7%)

▸ 농지 및 산지전용 협의                         : 2015. 2 ~ 6.

◦ 용동 삼정~두무간 도로확·포장공사

▸ 토지매입 및 행정절차 이행                : 2015. 3 ~ 12.

- 총 52필지 10,406㎡중  37필지 7,623㎡  ( 73%)

◦ 오산 북영선 도로확·포장공사

▸ 2, 3차분(배수로 및 포장공) 공사 추진      : 2015. 3 ~ 6.

- 현재 공정율 :  70%(6월 현재)

□  하반기 추진계획

◦ 여산 신리~호월간 도로확·포장공사

▸ 공사 추진(1차분)                          : 2015. 7 ~ 12.

▸ 2차분 (460백만원) 예산확보 및 공사추진    : 2016년 준공예정

◦ 성당 삼회선(성당우회도로) 도로확·포장공사

‣ 총괄 발주 및 1차분 공사 추진              : 2015. 7 ~ 12.

▸ 2차분 (459백만원 ) 예산확보 및 공사추진   : 2016.

◦ 용동 삼정~두무간 도로확·포장공사

▸ 토지매입 및 행정절차 이행                 : 2015. 7 ~ 12.

- 미매입토지 : 15필지 2,783㎡

▸ 예산확보( 1,671백만원) 및 공사추진        : 2016 ~ 2017

◦ 오산 북영선 도로확·포장공사

▸ 2, 3차분(배수로 및 포장공) 공사 추진      : 2015. 7 ~ 12.

▸ 공사준공 및 도로개통                      : 2015. 9.

※ 오산남초등학교 학생과 주민편익을 위하여 9월 조기 준공예정

시 ․ 군도 및 농어촌도로 사업추진현황(계속사업)

(단위 : 백만원)

우선 순위	사 업 명	사업개요	예 산 액				추진실적	노선명
			총 사업비	기투자	2015년 예산액	금후 투자
	20개사업	L=28.14km B=8m	38,053	7,899	1,100	29,054
1	함라 수동~금곡간 도로확.포장	L=1.23km B=7~8m	1,460	1,084		376	공사시행	함라 207 (수곡선)
2	오산 북영선 도로확.포장	L=1.73km B=8m	2,251	1,126	300	825	1공구공사중 (70%)	오산 204 (북영선)
3	여산 신리~호월간 도로확.포장	L=1.3km B=8m	1,108	262	500	346	공사시행	여산 203 (신호선)
4	삼성동 하나로~ 외화간도로확.포장	L=1.55km B=8m	3,180	730		2,450	용지 63%	시도1201 (외화선)
5	오산 신수선 도로확.포장	L=1.5km B=7m	1,079	879		200	용지 93%	오산 203 (신수선)
6	오산 장신~만석간 도로확.포장	L=1.6km B=8m	1,786	274		1,512	용지 87%	오산 301 (용연선)
7	용동 삼정~두무간 도로확.포장	L=1.21km B=8m	1,847	76	100	1,671	용지 73%	용동 204 (삼두선)
8	함라 진등 진입로 개설	L=1.43km B=6.5m	1,063	145		918	용지 85%	함라 201 (진다선)
9	함라 칠성~다은간 도로확.포장	L=1.0km B=6.5m	975	190		785	용지 85%	함라 201 (진다선)
10	오산 모산선(신모선) 도로확.포장	L=1.87km B=6.5m	2,096	212		1,884	용지 85%	오산 306 (신모선)
11	망성 군도10호~ 금지간 도로확.포장	L=1.2km B=8m	1,872	180		1,692	용지 66%	군도 10호
12	왕궁 군도26호선 도로확.포장	L=1.7km B=8m	2,970	577		2,393	용지 75%	군도 26호
13	망성 신성~관산간 도로확.포장	L=0.91km B=7m	1,365	306		1,059	용지 68%	망성 303 (신선선)
14	금마 갈산~서편간 도로확.포장	L=1.6km B=8m	2,829	229		2,600	용지 45%	금마 101 (서삼선)
15	왕궁 가좌마을 진입로확.포장	L=0.7km B=8m	1,116	103		1,013	용지 63%	왕궁 303 (사곡선)
16	금마 누동~신촌간 도로확.포장	L=0.93km B=8m	1,411	405		1,006	용지 56%	금마 102 (누부선)
17	왕궁 평화촌~평리간 도로확.포장	L=1.3km B=8m	3,445	180		3,265	용지 52%	왕궁 302 (신평선)
18	왕궁 온수~시대간 (황암~상발)확.포장	L=3.0km B=8m	2,803	296		2,507	용지 57%	군도 21호
19	춘포 토다리~덕동간 도로확.포장	L=1.0km B=6.5m	2,220	127		2,093	용지 9%	춘포 103 (신화선)
20	성당 삼회선(성당우회도로) 도로 확포장공사	L=1.38km B=8.0m	1,177	518	200	459	용지 7%	성당 302 (삼회선)

5		하천환경정비사업(산북천,왕궁천)

□ 사 업 개 요

사업명	위 치	사업기간	사 업 비(백만원)	사업 내용
산북천 하천환경 정비사업	용안면 난포리 금강 합류점 ~ 낭산면 죽청천 합류점	2010. ~ 2015.	30,000(국18,000 도6,000 시6,000) ▸2014년까지 : 21,795 ▸2015년 : 2,000	◦생태하천 조성 L=6.64km (교량1개소,호안정비132,800㎡,제방정비 12.7km 등) ▸현 공정 : 85%
왕궁천 하천환경 정비사업	왕궁면 동용리~ 춘포면 익산천 합류점	2015. ~ 2018.	24,720(국12,360 도4,944 시7,416) ▸2015년 : 800	하천정비 L=9.25km (제방축조 및 보축,교량가설등)

□ 상반기 추진실적

◦ 산북천 하천정비사업 1, 2공구 5차분(마무리) 착공	2015. 3.

◦ 왕궁천 하천정비사업 실시설계용역 조달발주	2015. 3.

▸용역업체 선정 및 용역 착수	2015. 6.

□ 하반기 추진계획

◎ 산북천 하천정비사업

◦ 산천북 하천정비사업 1,2공구 5차분(마무리) 추진	2015. 7.~12.

▸ 2015년까지 사업비 : 23,795백만원(국비 14,277  도비 4,759  시비 4,759)

◎ 왕궁천 하천정비사업

◦ 왕궁천 하천정비사업 실시설계용역 추진	2015. 7. ~ 2016. 3.

6		소하천 정비사업(신평천,오동정천,외산천)

사 업 명	위 치	사업기간	사업비(백만원)	사 업 량
신평천 소하천 정비공사	여산 호산리 일원	2013. ~ 2015.	3,670 (국1,835 시 1,835) ▸기투자 : 1,018 ▸2015년 : 1,500	소하천정비 L=1.07km ▸현공정 45%
오동정천 소하천 정비공사	망성 어량리 일원	2015. ~ 2016.	3,600 (국 1,800 시 1,800) ▸2015년 : 306 ▸금후 : 3,294	소하천정비 L=0.74km
외산천 소하천 정비공사	금마 산북리 일원	2015. ~ 2016.	1,800 (국비 900 시비 900) ▸2015년 : 306 ▸금후 : 1,494	소하천정비 L=0.62km ▸현공정 10%

□ 사 업 개 요

□ 상반기 추진실적

◦ 신평천 소하천정비공사 2차분 착공	2015. 3.

▸제방축조(0.7㎞) 및 호안블럭(3,400㎡) 설치 등

◦ 외산천 소하천정비공사 1차분 착공	2015. 6.

◦ 오동정천 소하천정비공사 토지매입 추진	2015. 3. ~ 6.

▸ 총 매입필지 57필지/16,405㎡ 중 12필지/4,876㎡

□ 하반기 추진계획

◦ 신평천 소하천정비공사 2차분 추진	2015. 7. ~ 12.

◦ 외산천 소하천정비공사 1차분 추진	2015. 7. ~ 12.

◦ 오동정천 소하천정비공사 1차분 착공	2015. 10.

7		하천기본계획(대조천,소하천정비)

사 업 명	위 치	사업기간	사업비(백만원)	사 업 량
대조천 하천기본계획	용동면 대조리~ 용안면 창리	2015.1. ~ 2015.12.	180 (도비90 시비90) ▸2015년 : 180	하천기본계획수립, L=3.0km ▸현공정 : 15%
소하천정비 종합계획	익산시 관내	2014.4 ~ 2015.10.	1,350 (시비 1,350) ▸2014년까지 : 500 ▸2015년 : 500	소하천 58개소 (L=98.5km) ▸현공정 : 55%

□ 사 업 개 요

□ 상반기 추진실적

◦ 대조천 하천기본계획 용역 착수	2015. 3.

◦ 소하천정비 종합계획 용역 착수(2차분)	2015. 5.

□ 하반기 추진계획

◦ 대조천 하천기본계획 용역 추진	2015. 7 ~2016. 2.

◦ 소하천정비 종합계획 용역 추진(2차분)	2015. 7 ~ 11.

▸ 소하천정비 종합계획 마무리를 위한 용역비 3.5억원 추가 확보 필요

8		국가하천 유지관리 사업

□ 사 업 개 요

◦ 재    원 : 국비 100%

◦ 사 업 비 : 234백만원 ( 4대강 163  · 4대강외 71 )

▸ 국고보조금 교부 및 송금에 따른 사업비 변경(당초 325백만원)

◦ 대 상 지

▸ 국가하천 34.2Km ( 금강 21.26 ․ 만경강 10.4 ․ 강경천 2.54 )

▸ 용안 생태습지 : 670,000㎡ ( 200,000평 )

◦ 사업내용

▸ 치수시설 : 제방유지관리  (호안보수, 배수시설, 예초작업 등 )

▸ 친수시설 : 금강생태하천에 설치한 산책로, 체육시설, 주차장,

편의시설, 수목 등에 대해 유지관리시행

□ 상반기 추진실적

◦ 금강생태하천 시설물 보수                           :  2015. 5.

▸ 용두배수장 낙석방지망, 자전거도로 갭수리, 표지판 수리등

▸ 용안생태하천 테크,갭 수리, 정자니스칠등

◦ 금강 웅포제 자전거 도로 주변시설물 철거            : 2015. 5.

▸ 웅포제 시설물 철거, 표지판16개소 철거

□ 하반기 추진계획

◦ 금강 생태하천(A=14,500㎡) 호습성 식물 식재          : 2015. 6.

◦ 금강 생태하천 제초 작업 실시                   : 2015. 7월. 10월(2회)

9		도로조명 시설 조도개선

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  : 익산시 일원

◦ 사 업 량  :  8개 사업

◦ 사 업 비  :  326백만원(시비)

◦ 사업기간  :  2015. 1. ~ 12.

◦ 도로조명 시설 조도개선 사업 내역

구 분	세부사업	사 업 개 요	예산 (천원)	비 고
합 계		8개 사업	324,500
보 안 등 신규설치	시민생활불편해소보안등설치	보안등신규설치 11개소	10,500
	생활환경 개선사업(보안등설치)	보안등신규설치 137개소	145,500
노 후 가로등정비	도심지역 도로조명 노후선로 정비단가	노후선로정비 60개소	60,000
	노후가로등점멸기교체	노후점멸기교체 5개소	22,500
	산업단지 및 자유지역 노후선로정비	산업단지 선로보수15개소	30,000
	안전점검부적합 보안등시설보수단가	부적합 보안등보수	30,000
	노후 보안등기구 교체 단가	노후 보안등기구 교체	10,000
	북부권고장보안등단가	고장보안등 수리	16,000

□ 상반기 추진실적  ---------- 6개사업완료(132,603천원)

◦ 노후가로등점멸기교체공사외 1개사업                 : 51,358천원

◦ 북부권고장보안등단가(1차)                        : 7,754천원

◦ 생활환경개선 보안등 설치공사 3개사업               : 73,491천원

□ 하반기 추진계획

◦ 노후선로정비 및 고장보안등 단가 시행중             : 2015. 5 ~ 9

◦ 보안등 공사 현지조사 및 설계                       : 2015. 7 ~ 8

◦ 보안등 공사 실시착공 및 준공                       : 2015. 8 ~ 11

□ 기 대 효 과

◦ 야간 취약지역 보안등 설치로 여성 및 노약자의 야간통행 편익제공

◦ 노후 도로조명정비 교체 및 보수로 조명시설 고장 민원 해소