경영개발과

	□		감사자료 과 공통사항
		1.			2014 업무성과 및 반성	………	195
		2.			2014 예산집행 및 추진사항	………	196
		3.			2014 행정사무감사 지적사항 조치결과	………	197
		4.			2014 상급기관 감사 지적사항 및 조치결과	………	200
		5.			시정질문 조치 결과	………	201
		6.			주요사업 조서(3천만원 이상)	………	201
		7.			2014 각종 민원 접수 처리내역	………	202
		8.			기금 운용 관련사항	………	203
		9.			위원회(자문위원회 포함) 운영 관련	………	204
		10.			용역사업 관련	………	205
		11.			각종 민간사회단체 보조금지원 관련	………	205
		12.			인․허가 민원처리 관련사항	………	205
		13.			각종공사 설계 변경 상황	………	206
		14.			건설공사 집행 현황(3천만원이상)	………	207
		15.			민간에 대한 보조금 집행 내역	………	207
		16.			국․도비 보조사업 집행현황(1억원이상)	………	208
		17.			명시 및 사고이월 사업비 집행내역	………	208
		18.			예산전용 사항 및 예비비 집행현황	………	208
		19.			공사 준공기한 연장내역	………	209
		20.			국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황	………	209
		21.			국․도비 반납현황	………	209
		22.			2014 계획사업중 미착공사업 현황	………	209
		23.			2014 계획사업중 유보 및 취소 사업현황	………	210
		24.			2014년도 이월사업중 유보 및 취소 사업현황	………	210
		25.			2014년도 예산편성후 전액 미집행 내역	………	211
		26.			소송사건 현황	………	211
		27.			시홈페이지 접수 민원처리 실태현황	………	212

	□		감사자료 과 요구사항
				1.	익산일반산업단지 진입도로 개설 추진현황 ……	217
				2.	함열농공단지(LED집적화단지)조성사업추진현황 ……	218

감사자료 과 공통사항

1. 2014 업무성과 및 반성

확인자	:	경영개발과장		황 재 택	□
작성자	:	경영행정계장		오 수 홍	□
		용지보상계장		김 삼 택	□
		경영개발계장		양 현 석	□

□ 성      과

○  익산일반산업단지 진입도로 개설공사

▸ 사  업 추  진   : 2010. 3월/ 2016. 2월 준공예정 (전체 공정률 48%)

▸ 공사준공(3차)   : 2014. 11.

▸ 토지 및 지장물 보상 추진 : 80% (대상 776천㎡/ 보상 624천㎡)

- 토지 755건/ 624천㎡, 지장물 785건, 분묘 277기

○  함열농공단지 (LED집적화단지) 조성사업

▸ 특수목적법인(SPC) 설립                         : 2014. 1. 14.

▸ 익산 함열농공단지 지정 승인(전라북도)          : 2014. 7. 17

▸ 익산 함열농공단지 사업시행자 지정(승인)        : 2014. 9. 16.

익산시장 ⇒ 익산엘이디협동화단지개발주식회사

▸ 환경영향평가서(초안) 협의(새만금지방환경청)      : 2014. 12.

▸ 토지 및 지장물 보상 추진(토지 65% 매입완료)     : 2014. 12.

2. 2014 예산집행 및 추진사항

확인자	:	경영개발과장		황 재 택	□
작성자	:	경영행정계장		오 수 홍	□

【 2014. 12. 31 현재 】                                            (단위 : 천원)

예 산 과 목		예 산 액 (A)	집 행 액 (B)	잔 액	비율(%) (B/A)	비 고
합 계		21,855,917	17,358,930	4,496,987	79.4
소 계		1,053,830	1,044,225	9,605	99.1
수 익 적 지 출	○ 영 업 비 용	1,053,830	1,044,225	9,605	99.1
	▸인 건 비	721,109	712,592	8,517	98.8
	▸직무수행경비	39,671	39,665	6	99.98
	▸일 반 운 영 비	35,348	35,215	133	99.6
	▸여 비	38,480	37,901	579	99.9
	▸업무추진비	9,120	9,107	13	98.5
	▸복 리 후 생 비	12,171	12,082	89	99.3
	▸포 상 금	38,212	38,211	1	99.99
	▸연금부담금등	159,719	159,452	267	99.8
소 계		20,802,087	16,314,705	4,487,382	78.4
자 본 적 지 출	○ 재 고 자 산	10,738,107	9,685,314	1,052,793	90.2
	▸시 설 비	6,777,357	5,756,689	1,020,668	84.9	계속비이월
	▸시 설 부 대 비	420,000	395,188	24,812	94.1	계속비이월
	▸지급이자등	3,540,750	3,533,437	7,313	99.8
	○ 비유동부채상환금	1,000,000	1,000,000	0	100
	▸차입금원금상환	1,000,000	1,000,000	0	100
	○ 기타자본적지출	5,721,800	5,629,391	92,409	98.4
	○ 예 비 비	3,342,180	0	3,342,180	0

3. 2014 행정사무감사 지적사항 조치결과

확인자	:	경영개발과장		황 재 택	□
작성자	:	경영개발계장		양 현 석	□

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과	비고
1	진입도로 개설공사는 예산절감을 이유로 최저가입찰로 추진되는 사업인데 설계변경으로 인하여 사업비가 증액되어 당초취지에 맞지 않아 입찰선정 방식에 특혜 의혹이 있을수 있으므로 관리 감독을 철저히 하기 바람.	설계변경은 정부합동 감사시 시방서 및 제규정에 따라 교량 공법을 변경 적용하라는 감사 지적사항에 대해 일부 다리의 공법을 변경한 사항으로, 설계변경 과정에서 도급액은 증액되었으나 총공사비는 28억원 정도 (관급자재 감)를 절감한 사항으로 추후 설계변경시 신중히 검토하고 품질관리에 만전을 기하도록 하겠음.
2	진입도로 개설공사 잔여사업비 확보에 총력을 기울이고 현 공정율로 볼 때 사업기간이 촉박하여 부실시공이 되지 않도록 하기 바람.	현 공정이 48%로 계획에 맞추어 시행 되고 있어 사업기간에 문제는 없으나 예산 확보 지연으로 준공이 늦어지고 있어 국비 확보를 위해 다각적인 노력을 하고 있으며, 예산이 확보되면 충분한 시간을 가지고 추진하여 부실 시공이 되지 않도록 하겠음.

확인자	:	경영개발과장		황 재 택	□
작성자	:	경영개발계장		양 현 석	□

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과	비고
3	산업단지가 작년 6월에 완공되었는데 주변마을 주민숙원사업 미 지원 부분에 대한 예산대책을 세워 주민과의 약속을 이행하기 바람.	올해 예산(475백만원)에 편성되어 삼기면, 낭산면 주민숙원 사업을 추진중에 있으며 12월중 마무리 하겠음.
4	산업단지내 소공원의 조경수 식재가 미비하고 상당수는 고사되어 미관상 좋지 않으므로 조치하기 바람.	올해 봄 조경부문 하자보수 전수조사를 실시하였고, 하절기 수목이식에 따른 추가하자 발생 우려 및 하자보수 품질관리를 위하여 수목이식 적기(10월)에 하자보수를 이행할 예정임.
5	올해 9월 LED사업자가 변경되었으므로 설계용역 추진이 선행되어야 할 것이며 토지보상가가 낮게 책정 되었다는 민원이 제기되므로 적극적인 대안 마련이 요구됨.	현재 설계용역이 SPC에 인계인수 완료되어 SPC로부터 713백만원을 정산 받았으며, 용역은 현재 추진중에 있음. 재감정은 현재 토지 미협의자들과 주민설명회를 통해 재감정평가 업체 3개를 선정(주민 2개, 전북도 1개)후 진행중에 있음.

확인자	:	경영개발과장		황 재 택	□
작성자	:	용지보상계장		김 삼 택	□
작성자	:	경영개발계장		양 현 석	□

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과	비고
6	사업기간이 늦춰질수록 입주의향 업체가 타시군으로 이탈할 우려가 있으므로 사업이 지연 되지 않도록 적극적으로 추진하기 바람.	현재 개발계획 변경 추진중에 있으며 SPC와 긴밀한 업무협조를 통해 조속히 행정절차를 완료토록 하겠으며, 기공식 추진을 통해 관련업계에 홍보 등 입주의향 업체가 타지역으로 이탈하지 않도록 노력하겠음.
7	영등지역 택지개발 분양수익금으로 산업단지 조성 및 일반회계의 전출금 등 시의 균형발전을 위해 사용하였으나 영등지역의 교통체증, 주차난 해소를 위한 대안마련에도 투자가 될 수 있도록 검토하기 바람.	향후 산업단지 분양이 완료되어 이익금이 발생하면 국비 확보 등 노력을 통하여 영등 지역 주차난 해소를 위해 재투자 하도록 방안을 모색하도록 하겠음.

4. 2014 상급기관감사 지적사항 및 조치결과

확인자	:	경영개발과장		황 재 택	□
작성자	:	용지보상계장		김삼택	□

감사기간		2014. 12. 05 ~ 12. 12	감사기관	전라북도
연번	지 적 사 항		처 리 결 과		비고
1	•국․공유재산 교환 부적정 공유재산 및 물품관리법 제39조, 익산시 공유재산관리조례 시행규칙 제17조에 따라 익산일반산업단지를 조성하기 위하여 익산시 소유 삼기면 오룡리 1307번지(구거) 와 한국농어촌공사 소유 삼기면 연동리 651-17번지(구거)를 교환하면서 차액 669천원을 납입 받지 않아 시정조치		전라북도 감사관 - 4487(2015. 5.18)호로 현지처분 요구에 따라 2015. 5. 22 한국농어촌공사로 공유재산 교환에 따른 차액금 669천원 납부 요청함.

5. 시정질문 조치결과

확인자	:	경영개발과장		황 재 택	□
작성자	:	경영행정계장		오 수 홍	□

해  당  없  음

6. 주요사업 조서 (3천만원이상)

확인자	:	경영개발과장		황 재 택	□
작성자	:	경영개발계장		양 현 석	□

(단위 : 천원)

사 업 명	사업내용	사업비 (2014까지예산)	집행액	잔 액	추진사항	비 고
계	2개 사업	160,810,513 (89,719,513)	86,399,771	3,319,742 (계속비이월 3,319,742)
익산 일반산업단지 진입도로개설공사	L=11.86km B=20m(4차로) 교량 19개소	160,484,000 (89,393,000)	86,083,000	3,310,000 (계속비이월 3,310,000)	공정율 48%	2012. 3월 착공 2016. 2월 준공예정
익산종합의료 과학산업단지 가감속차로 확포장공사	가감속차로 L=390m	326,513 (326,513)	316,771	9,742 (계속비이월 9,742)	공정율 100%	2014.8월준공 2015. 5월 교통안내 표지판 설치

7. 2014 각종 민원(진정, 건의, 청원 등) 접수 처리내역

확인자	:	경영개발과장		황 재 택	□
작성자	:	경영개발계장		양 현 석	□

▣ 민원 접수현황

(단위 : 건수)

계	진 정	질 의	요 청	탄 원	건 의
3	3	-	-	-

▣ 민원 접수처리 내역

일자	종류	건 명	요구내용	처리내용
2014. 6. 9	진정	익산일반산업단지 진입로 가감속차로 확장공사	방사선영상기술센터 앞 마을도로와 산업단지내 도로연결을 위한 진입로 개설을 중지해줄 것을 요청	진입로개설은 마을주민의 요구로 진출입확보시 인근 주민의 진출입이 용이하고 안전하다고 판단되어 산업단지 개발계획에 반영 추진한 사항 으로 마을주민간의 충분한 합의가 이루어 질 때까지 시행 여부를 결정하겠음을 회신
2014. 6.25	진정	아파트신축등 개발 계획여부	민원인이 매수한 토지(함열읍 와리 일원)주변으로 아파트 및 상가 개발지로 예정되어 있는지와 토지분할목적 사업계획서를 통한 판정의 여부 및 매매계약 당시 주변에 건축 허가 신청건이 있었는지에 대한 문의	우리시에서 민원인의 매수토지 주변으로 아파트 및 상가조성을 계획한 적이 없고 또한 토지주인 ㈜삼화씨아이디에서 소유권 이전을 목적으로 토지분할 신청하였고 매매계약 당시 민원인의 토지 주변에 건축허가 신청건이 없었음을 회신
2014. 8.22	진정	함열농공단지(LED집적화단지)조성 사업	함열농공단지에 편입되는 토지의 저평가에 대한 적절한 보상이 될수 있도록 조치 요청	함열농공단지에 편입되는 토지 등에 관한 보상금액은 익산시· LED조합·합열읍(주민추천)에서 추천한 3개의 감정평가 기관이 평가한 평가액의 산술 평균한 가격으로 익산시에서는 감정평가 금액에 대해 관여할 수 없음을 회신

8. 기금운용 관련사항

확인자	:	경영개발과장		황 재 택	□
작성자	:	경영행정계장		오 수 홍	□

해  당  없  음

9. 위원회(자문위원회 포함) 운영 관련

확인자	:	경영개발과장		황 재 택	□
작성자	:	경영개발계장		양 현 석	□

□ 위원회 설치 및 운영현황

위원회명	설치근거	구성 원수	임기	기능 구분	운영 횟수	예 산 현 황
						운영예산	위원수당지급내역	불용예산현 황
익산시 출자 심의위원회	익산시 출자심의 위원회 구성 및 운영에 관한 규칙	7	2년	심의	-	-	-	-

□ 위원회 명단

위원회명	직 위	소속(직위)	위원성명	선임일자	비 고
익산시 출자 심의위원회	위원장	부 시 장	한 웅 재	당연직
〃	부위원장	문화산업국장	이 수 근	〃
〃	위원	안전행정국장	이 산 재	〃
〃	〃	건설교통국장	최 광 석	〃
〃	〃	국제통상학부교수	김 미 아	2013. 11. 6
〃	〃	경영학부교수	조 현 진	〃
〃	〃	회 계 사	윤 태 화	〃

10. 용역사업 관련

확인자	:	경영개발과장		황 재 택	□
작성자	:	경영개발계장		양 현 석	□

해  당  없  음

11. 각종 민간사회단체 보조금지원 관련

확인자	:	경영개발과장		황 재 택	□
작성자	:	경영행정계장		오 수 홍	□

해  당  없  음

12. 인 ․ 허가 민원처리 관련사항

확인자	:	경영개발과장		황 재 택	□
작성자	:	경영행정계장		오 수 홍	□

해  당  없  음

13. 각종공사 설계변경 상황

확인자	:	경영개발과장		황 재 택	□
작성자	:	경영개발계장		양 현 석	□

일자	사 업 명	계약액	변경액	증감	계약자	공사기간	변경사유등
계	2개사업	112,312,812	111,874,956	감437,856
2014. 11. 07	익산일반산업단지진입도로개설공사	112,143,766	111,690,445	감453,321	㈜대림산업 외3개사	2012.3.02 ~ 2016.2.29	감사원,전라북도감사조치 사항반영
2014. 7. 25	익산종합의료 과학산업단지 진입도로 가감속차로 확장공사	169,046	184,511	15,465	㈜우주로 대표 김나현	2014.4.28 ~ 2014.8.05	버스정차대 설치로 인한 보도폭 확장, 교통 안전 시설물 경찰서 협의사항 반영, 인도 난간 설치 등

14. 건설공사 집행현황(3천만원 이상)

확인자	:	경영개발과장		황 재 택	□
작성자	:	경영개발계장		양 현 석	□

(단위 : 천원)

사 업 명	사업내용	사업비	집행액	잔 액	추진사항	비고
계	2건	80,786,153	40,666,279	40,119,874
익산일반산업 단지 진입도로 개설공사	L=11.86km B=20m(4차로) 교량 19개소	80,601,642	40,481,768	40,119,874	공정율 48%	계속 사업
익산종합의료 과학산업단지 진입도로 가감속차로 확장공사	L=390m B=3m	184,511	184,511	0	공정율 100%	계속 사업

15. 민간에 대한 보조금 집행내역

확인자	:	경영개발과장		황 재 택	□
작성자	:	경영행정계장		오 수 홍	□

해  당  없  음

16. 국   ․ 도비 보조사업 집행현황(1억원 이상)

확인자	:	경영개발과장		황 재 택	□
작성자	:	경영개발계장		양 현 석	□

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액				집 행 액
	계	국비	도비	시비	계	국비	도비	시비
익산일반산업단지진입도로개설공사	89,393,000	79,993,000	2,700,000	6,700,000	86,083,000	76,683,000	2,700,000	6,700,000

17. 명시 및 사고이월사업비 집행내역

확인자	:	경영개발과장		황 재 택	□
작성자	:	경영행정계장		오 수 홍	□

해  당  없  음

18. 예산전용 사항 및 예비비 집행현황

확인자	:	경영개발과장		황 재 택	□
작성자	:	경영행정계장		오 수 홍	□

해  당  없  음

19. 공사 준공기한 연장내역

확인자	:	경영개발과장		황 재 택	□
작성자	:	경영행정계장		오 수 홍	□

해  당  없  음

20. 국 ․ 도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황

확인자	:	경영개발과장		황 재 택	□
작성자	:	경영행정계장		오 수 홍	□

해  당  없  음

21. 국  ․ 도비 반납현황

확인자	:	경영개발과장		황 재 택	□
작성자	:	경영행정계장		오 수 홍	□

해  당  없  음

22. 2014 계획사업 중 미착공사업 현황

확인자	:	경영개발과장		황 재 택	□
작성자	:	경영행정계장		오 수 홍	□

해 당 없 음

23. 2014 계획사업중 유보 및 취소 사업현황

확인자	:	경영개발과장		황 재 택	□
작성자	:	경영행정계장		오 수 홍	□

해  당  없  음

24. 2014년도 이월사업 중 유보 및 취소된 사업

확인자	:	경영개발과장		황 재 택	□
작성자	:	경영개발계장		양현석	□

사 업 명	사업내용	예산액 (백만원)	유 보 사 유
신재생자원센터주변지역 도시개발사업	부송동 일원 (신재생자원센터 주변) 331천㎡	32,800	배산택지개발입주, 일반산업단지 지원시설 분양(2만5천평)과, 부동산 경기 침체로 택지개발 여건이 성숙될 때까지 개발 조절 필요
익산제3일반산업 단지 폐수종말처리시설증설사업	2단계(증설) 2,500톤/일	10,709	산업단지 입주기업의 폐수배출량이 1단계로 완료한 5,500톤/일 대비 60%미만으로 용역중지

25. 2014년도 예산편성 후 전액 미집행 내역

확인자	:	경영개발과장		황 재 택	□
작성자	:	경영개발계장		양 현 석	□

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액	미 집 행 사 유	비 고
익산제3일반산업단지 폐수종말처리 증설사업 국고보조금반환금	45,000	환경부 내부사정에 따른 행정 절차지연으로 집행연기

26. 소송사건 현황

확인자	:	경영개발과장		황 재 택	□
작성자	:	용지보상계장		김 삼 택	□
작성자	:	경영개발계장		양 현 석	□

사 건 명	사 건 개 요	원 고	피 고	접수일	추진사항 (판․종결일)
전주지방법원 2014가단6062	익산제3일반산업단지 지적확정측량 공사대금 추가청구	㈜한국지적 측량사업단	익산시	2014. 2.21	2014.12.15 1심패소후 항소
전주지방법원 2014구합1267	손실보상청구	장동현	익산시	2014. 5.15	속행
전주지방법원 2014구합3058	손실보상금	신상균 외 1명	익산시	2014.10.20	답변서 제출
전주지방법원 2014가합7598	폐수종말처리장 공사대금추가청구	㈜금호산업외 2명	익산시	2014.11.13	2014.12.29. 답변서제출

27. 시 홈페이지 접수 민원처리 실태현황

확인자	:	경영개발과장		황 재 택	□
작성자	:	용지보상계장		김 삼 택	□
작성자	:	경영개발계장		양 현 석	□

일자	건 명	요구내용	처리내용
2014. 1.13	익산일반산업단지 진입도로 개설공사	산업단지 진입도로 공사로 인한 낭산면 구평리 축사 보상을 이전보상비가 아닌 폐업보상으로 요청	축산폐업보상이 불가한 점을 민원인에게 설명하고 보상절차에 의거 보상을 실시할 예정임을 안내
2014. 3.26	함열농공단지(LED 집적화단지)조성공사	함열농공단지조성에 따른 일부 토지주들이 편입되는 토지보상가격이 기대에 미치지 못함에 대한 시정요청	토지보상 협의 가격인 감정가 산정은 토지 소유자들의 협의로 추천한 감정 평가사, 익산시 및 LED협동조합이 추천한 평가사등 3인이 현장 확인등 절차를 거쳐 산정한 가격임을 민원인에게 설명
2014. 4. 3	익산일반산업단지 입주기업계약관련	A기업의 특혜성 계약에 대한 해명요구	익산일반산업단지에 입주한 a기업의 경우 총8,500억의 대규모 투자로 지역발전과 지역경제 활성화를 위하여 공장부지를 제공하고 일부 부지대금을 공장을 건설한 이후 투자유치보조금으로 사후 정산하기로 협약하여 「익산시 공영개발사업용지규정」 제67조에 의하여 매각촉진을 위한 공급목적과 상대방의 사업계획에 비추어 필요한 경우에 해당되어 기업의 초기 투자비용 부담을 해소하고 투자촉진을 위하여 계약하였으며 계약금을 납입하고 잔금 납입일을 명시하지 않은 사유는 기업이 보조금 신청할 때 투자금액에 대한 기업의 연차별 사업투자 실적에 따라 보조금을 신청하도록 되어 있고 사업진행 사항과 시설 투자금액 심의 및 확정 결과 투자유치 보조금을 지급함으로 잔금 상환하는 시점을 정할 수 없어 잔금 납입일을 기입하지 않았으나 보조금 신청은 4년에서 6년 내로 완료 해야 함으로 그 기간내에 부지대금이 회수될 수 있음을 설명

일자	건 명	요구내용	처리내용
2014.10.20	익산일반산업단지 진입도로개설공사	산업단지 진입도로 교량공사에 대한 문제점 시정요청	강경천 교량 설계시 주민들의 통행권 확보를 위하여 제방 하부에 우회도로 개설계획을 수립하여시행중으로 교량과 우회도로간 높이를 최대한 확보하여 공사 완공시 농기계 통행, 순례객들의 통행시 불편한 점이 없도록 할 것임을 민원인에게 설명
2014.10.23	익산일반산업단지 진입도로개설공사	산업단지 진입도로 설계시 노선에 대한 주민의 의견이 충분히 반영되었는지와 낭산면 소재 폐기물업체 녹원에 대한 도로 편입문제 등 산업단지 진입도로 편입토지(망성면 어량리 왕촌마을,무형리 고산마을)에 대한 적절한 보상이 있었는지에 대한 답변요청	기획재정부 예비타당성 조사를 실시하여 가장 경제적이고 시공성이 우수한 노선 검증을 받아 국토부 에서 노선이 확정되어 시행중인 사안이며「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의거 적법하게 보상을 실시하였고 노선 바로옆에 위치한 야정마을 주변에는 소음등 주변 환경저해요인에 대하여 방음벽 설치등을 실시하여 주민피해를 최소화 할수 있도록 시공할 계획임을 충분히 설명하고 이해시킴.
2014.11.11	함열농공단지(LED 집적화단지)조성공사	함열읍 와리 LED 농공단지 묘지이장 보상관련	사업시행자인 익산엘이디협동화단지개발(주) 내부사정으로 인한 사유로 보상금 지급이 지연되었으나 우리시 요청으로 보상금 지급을 빠른 시일내에 지급한다는 내용을 민원인에게 설명

경영개발과 요구사항

1. 익산일반산업단지 진입도로 개설 추진현황

확인자	:	경영개발과장		황 재 택	□
작성자	:	경영개발계장		양 현 석	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산제3일반산업단지 (낭산면) ~ 연무 IC (논산시 연무읍)

◦ 사업내용 : 도로신설 L = 11.86㎞ (4차로), 교량신설 19개소 (1,245m)

◦ 사업기간 : 2010 ~ 2016 (7년)

◦ 총사업비 : 1,604억원 (공사비 1,187 보상비 등 417)

※ 재원별 : 국비 809, 도비 27, 시비 768

◦ 2014년까지 투자액 : 893억원 (국비 799, 도비 27, 시비 67 )

◦ 2014년 공정률 : 48% (현 공정율 48%)

□ 추 진 실 적

◦ 관계기관 협의 (산림청, 농식품부, 국토관리청, 지방환경청)  : 2011.  3.

◦ 실시설계 완료                                    : 2011.  8.

◦ 공사 착공 (3차분)                                 : 2014.  1. 27.

◦ 공사 준공 (3차분)                                 : 2014. 11. 11.

◦ 용지 및 지장물보상 (80%)                         : 2014. 12.

2. 함열농공단지(LED집적화단지) 조성사업

확인자	:	경영개발과장		황 재 택	□
작성자	:	경영개발계장		양 현 석	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 함열읍 ․ 용안면 일원

◦ 사업규모 : 329천㎡

◦ 사업내용 : LED전문산업단지 조성

◦ 사업기간 : 2011 ~ 2016 (6년)

◦ 총사업비 : 350억원 (SPC)

▸ 민간 313억, 국비 30억, 도비 5억, 시비(출자금) 2억

□ 추 진 실 적

◦ 감정평가 실시                                     : 2014.  1.  3.

◦ 특수목적법인 설립 등기완료                        : 2014.  1. 14.

◦ 단지지정 및 개발계획 승인신청 및 승인(전북도)      : 2014.  4.  9.

◦ 익산 함열농공(전문)단지 지정승인(전북도)            : 2014.  7. 17.

◦ 사업시행자 지정(승인) 통보                         : 2014.  9. 16.

◦ 보상계획 공고 및 분묘개장(1차)　공고               : 2014.  9. 24.

◦ 용역 인수·인계에 따른 비용정산                   : 2014.  9. 24.

◦ 분묘개장공고(2차)                                  : 2014. 11. 24.

◦ 환경영향평가서 초안협의 및 공람공고               : 2014. 12.  9.

◦ 용지매입(65%)                                     : 2014. 12. 31.