역사문화재과

	□		감사자료 과 공통사항
		1.			2014 업무성과 및 반성	………	157
		2.			2014 예산집행 및 추진사항	………	158
		3.			2014 행정사무감사 지적사항 조치결과	………	160
		4.			2014 상급기관 감사 지적사항 및 조치결과	………	161
		5.			시정질문 조치 결과	………	161
		6.			주요사업 조서(3천만원 이상)	………	162
		7.			2014 각종 민원 접수 처리내역	………	165
		8.			기금 운용 관련사항	………	165
		9.			위원회(자문위원회 포함) 운영 관련	………	166
		10.			용역사업 관련	………	168
		11.			각종 민간사회단체 보조금지원 관련	………	169
		12.			인․허가 민원처리 관련사항	………	169
		13.			각종공사 설계 변경 상황	………	170
		14.			건설공사 집행 현황(3천만원이상)	………	172
		15.			민간에 대한 보조금 집행 내역	………	173
		16.			국․도비 보조사업 집행현황(1억원이상)	………	174
		17.			명시 및 사고이월 사업비 집행내역	………	176
		18.			예산전용 사항 및 예비비 집행현황	………	177
		19.			공사 준공기한 연장내역	………	177
		20.			국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황	………	177
		21.			국․도비 반납현황	………	178
		22.			2014 계획사업중 미착공사업 현황	………	179
		23.			2014 계획사업중 유보 및 취소 사업현황	………	179
		24.			2014년도 이월사업중 유보 및 취소 사업현황	………	179
		25.			2014년도 예산편성후 전액 미집행 내역	………	179
		26.			소송사건 현황	………	179
		27.			시홈페이지 접수 민원처리 실태현황	………	180

	□		감사자료 과 요구사항
				1.	백제역사유적지구 세계유산 등재 추진실적 ………	183
				2.	고도육성 기반구축사업 추진실적 …………………	184
				3.	옥룡천 옛물길 회복사업 추진실적 ………………	185
				4.	이주단지 조성사업 추진실적 ………………………	186
				5.	문화유산 보존정비 현황 ……………………………	187
				6.	익산 중요무형문화재 통합전수관 건립 추진실적 …	189

감사자료 과 공통사항

1. 2014 업무성과

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		전영수	□
		고도육성계장		김 대 영	□
		문화재시설계장		배 석 희	□

□ 성      과

◦ 백제역사유적지구 세계문화유산 등재 추진

▸등재신청서 유네스코 제출 (문화재청 ⇒ 유네스코, 1. 21.)

▸세계유산 등재 예비실사(4회) 및 현지실사(9. 19.)

◦ 고도보존육성사업 추진

▸옥룡천 옛물길 회복사업 하천기본계획 변경 및 실시설계 용역 추진

▸이주단지 조성을 위한 토지 및 지장물 협의 매입 (86.5%)

- 토지 37필지(21,251㎡), 지장물 19건 중 26.5필지(18,392㎡), 지장물 12건

◦ 문화유산 신규 지정 및 문화재 보존정비 추진

▸국가지정 문화재 등 신규 지정 : 4건

- 관음사목조보살입상 (보물 제1842호)

- 백용성 역 한글본「신역대장경」(등록문화재 제646호)

- 간재선생유적(익산시향토유적 제14호), 화암서원(익산시향토유적 제15호)

▸왕궁리 유적, 제석사지 등 유적정비 공사 추진 : 29건

- 국가지정 문화재 10건 / 도지정 문화재 17건 / 기타[전통사찰] 2건

◦ 익산 중요무형문화재 통합전수관 건립 착공 (10월)

2. 2014예산집행 및 추진사항

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		전영수	□

【 2015. 2. 28현재 】                                           (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율(%)	비 고
역사문화재과				15,517,579	8,702,764	6,814,815	56.1
	전통문화 보존 및 전승			15,325,389	8,513,238	6,812,151	55.5
		유형문화재 보존		7,203,085	5,673,320	1,529,765	78.8
			문화재 보수 정비	194,482	190,194	4,288	97.8
			왕궁리 유적 정비	2,099,739	1,715,858	383,881	81.7	계속비이월 383,881
			제석사지 정비	578,791	431,760	147,031	74.6	계속비이월 147,031
			문화재 운영	32,650	31,153	1,497	95.4
			도지정 문화재 보수정비	889,259	844,685	44,574	95.0	명시이월 33,819
			국가지정 문화재 보수정비	1,447,206	992,262	454,944	68.6	명시이월 276,644
			익산역사유적지구 세계문화유산등재추진	58,918	58,866	52	99.9
			중요목조문화재 감시인력 배치	109,248	96,243	13,005	88.1
			문화재 재난방지 시스템 구축	71,065	47,123	23,942	66.3	명시이월 15,000
			익산시민 백제문화유산지킴이 사업추진	2,000	2,000	0	100.0
			세계유산 보존관리체계구축사업	8,910	8,910	0	100.0

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율(%)	비 고
			세계유산 통합사무국 설치운영	475,000	475,000	0	100.0
			전통사찰보존사업	275,817	269,266	6,551	97.6
			문화재 활용 생생사업	60,000	60,000	0	100.0
			미륵사지 유구정비	900,000	450,000	450,000	50.0	명시이월 450,000
		무형문화재 보존 및전승		2,206,710	948,947	1,257,763	43.0
			기예능 보유자 전수지원	124,248	124,248	0	100.0
			무형문화재 전수활동비	61,200	60,400	800	98.7
			무형문화재 전수관 건립	2,009,262	752,299	1,256,963	37.4	계속비이월 1,256,963
			기예능 보유자 전수지원(보조)	12,000	12,000	0	100.0
		유적정비		5,915,594	1,890,971	4,024,623	32.0
			고도보존 정비	24,000	24,000	0	100.0
			향토유적 정비	5,030	1,640	3,390	32.6
			익산고도육성사업(보조)	5,879,864	1,860,431	4,019,433	31.6	명시이월 3,960,988
			익산고도육성사업	6,700	4,900	1,800	73.1
	재무활동			174,767	172,637	2,130	98.8
		보전지출		174,767	172,637	2,130	98.8
	행정운영경비			17,423	16,889	534	96.9
		기본경비		17,423	16,889	534	96.9

3. 2014행정사무감사 지적사항 조치 결과

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		전영수	□
		고도육성계장		김 대 영	□
		문화재시설계장		배 석 희	□

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과	비고
1	• 용역사업 관련 ▸용역사업 15개 사업 중 7개 사업을 수의계약 했는데 예산절감을 위해서 가능하면 경쟁 입찰을 통해 계약 하기 바람	▸역사문화재과 부서 특성상 전문성을 요하는 사업이 많아 수의 계약을 하였는데 수의 계약이 최소화 되도록 노력 하겠음
2	• 무왕길 관리 철저 ▸무왕길을 적극 홍보하고 있음에도 불구하고 서동생가, 용샘에 대한 관리실태가 매우 부실하니 조속히 정비하기 바람	▸방문객의 불편이 최소화 될 수 있도록 안내판과 탐방로 등을 정비하고 지속적으로 관리중임

4. 2014상급기관 감사 지적사항 및 조치 결과

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	문화재시설계장		배석희	□

감사기간	2014. 12. 5 ～ 12. 12	감사기관	전라북도
지 적 사 항		조 치 결 과
• 누락시공 설계변경 미이행 ▸문화재 보수공사를 추진하면서 설계와 맞지 않게 시공한 경우 설계변경을 통해 계약금액을 조정하여야 하나 설계변경을 미이행하여 3,424,830원을 과다하게 지급하였음.		▸앞으로는 유사한 사례가 재발하지 않도록 주의하겠으며, 부적정하게 지급된 3,424,830원에 대하여 회수 조치 완료.

5. 시정질문 조치 결과

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		전영수	□

해  당  없  음

6. 주요사업 조서(3천만원 이상)

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		전영수	□
		고도육성계장		김 대 영	□
		문화재시설계장		배 석 희	□

(단위 : 천원)

사 업 명	사업개요	사업비	집행액	잔 액	추진사항	비고
계	37개 사업	12,395,517	5,666,188	6,729,329
세계문화유산 등재 스토리텔링 조사연구용역	세계유산 스토리텔링 및 콘텐츠 개발	47,750	47,750	0	완료
2013 고도육성기반구축	아카데미,포럼, 계간지발간 등	75,000	68,236	6,764	완료
2014 고도육성기반구축	아카데미,포럼, 계간지발간 등	148,665	74,332	74,333	용역추진 (2014.5.26.~ 용역일시중지중)	명시 이월
익산고도보존육성 시행계획 적정성 재검토 조사용역	익산고도보존육성 시행계획 경제적 정책적 타당성분석	34,000	34,000	0	완료
이주단지조성을 위한 개발계획 수립 및 실시설계용역	이주단지(A=23,881㎡)조성을 위한 설계용역	98,750	93,363	5,387	완료
이주단지조성 (토지매입비및공사비등)	발굴조사,토지매입,토목,전기공사	3,346,524	954,744	2,391,780	공사추진(2015.3~2016.11)	명시 이월
옥룡천옛물길회복사업 하천기본계획변경 및 실시설계용역	옥룡천옛물길회복 및 하천정비를 위한 설계용역	187,696	187,696	0	완료
문화재구역 토지매입	미륵사지 고도경관 훼손지역 토지매입 24필지 36,821㎡	152,457	124,169	28,288	완료
주거환경개선 가이드라인용역	백제건축,조경, 디자인요소발굴	80,000	0	80,000	용역추진 (2015.3~2016.3)	명시 이월
옥룡천 옛물길 회복사업	1차토지매입 (천변공원조성부지)	1,428,571	16,613	1,411,958	보상협의추진 (2015.1~2015.12)	명시 이월
왕궁리유적 정비	동측 및 서측 궁장정비	796,870	413,248	383,622	2014년분 보수정비완료(2014.7~2015.4)	계속비 이월
왕궁리 유적 발굴조사	발굴조사	700,000	700,000	0	완료
제석사지 정비	유구정비	450,000	302,969	147,031	유구정비완료 (2014.7~12)	계속비 이월
익산향교 대성전 정비	대성전 보수	100,000	99,222	778	완료
심곡사 명부전 지장보살좌상 및 권속 정비	불상 및 권속 보존처리	50,000	50,000	0	완료
여산숲정이 순교성지 정비	주차장 아스콘 포장 및 토지매입	104,000	70,181	33,819	주차장 포장완료 (2013.10~2014.4)	명시 이월
김안균가옥 정비	창고동 해체보수	137,504	137,504	0	완료
여산동헌 정비	지붕번와보수	30,000	25,777	4,223	완료
태봉사 삼존석불 정비	삼성각 및 종각 보수	30,000	30,000	0	완료
여산향교 대성전 정비	담장, 협문, 법면 보수	30,000	21,327	8,673	완료
함열향교 대성전 정비	영소전, 내삼문 보수	30,000	27,906	2,094	완료
용안향교 대성전 정비	대성전, 관리사 보수	30,000	16,673	13,327	완료
미륵산성 정비	종합정비계획 수립	50,000	44,053	5,947	완료
망모당 정비	정밀실측조사	30,000	26,269	3,731	완료
이배원가옥 정비	지붕 해체보수	95,000	93,176	1,824	완료
원불교 익산성지정비	종법실 보수	316,913	236,080	80,833	완료
익산 나바위 성당정비	종합정비계획수립 정밀안전진단	200,000	57,373	142,627	정밀안전진단 완료 (2014.3~2015.4) 종합정비계획(안) 문화재청협의중	명시 이월
익산 연동리 석조여래좌상 정비	대웅전, 삼성각, 종각 보수	130,000	90,713	39,287	완료
익산 입점리 고분 정비	고분군 보수	200,000	193,625	6,375	완료
익산 숭림사 보광전 정비	수로정비 요사채단청	120,000	117,354	2,646	완료
자명사 정비	승방단청보수	79,478	77,912	1,566	완료
심곡사 정비	방재시스템 구축	196,339	191,354	4,985	완료
문화재 활용 생생사업	백제왕궁 천년별밤캠프 시행	60,000	60,000	0	완료
미륵사지 정비	미륵사지 복원 기본연구	900,000	450,000	450,000	미륵사지 복원 기본연구비 집행완료 (2015.3.18.)	명시 이월
익산 중요무형문화재 통합 전수관 건립	전수관 건립	1,750,000	493,037	1,256,963	공사추진 (2014.10~2016.12)	계속비 이월
원불교 익산성지 정비	토양처리 및 군체제거시스템설치	30,000	23,549	6,451	완료
왕궁리 오층석탑 정비	보존처리	150,000	15,983	134,017	보존처리완료 (2014.10~2015.4)	명시 이월

7. 2014 각종 민원(진정, 건의, 청원 등) 접수 처리내역

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		전영수	□
		고도육성계장		김 대 영	□
		문화재시설계장		배 석 희	□

종 류	민원인	요 구 내 용	처 리 내 용
진정	김권호	본인 소유의 토지 금마면 동고도리 683-1를 옥룡천 옛물길 회복사업 편입토지에서 제척요구	이해, 설득 종결 (2015. 3. 27 협의매입 완료)
건의	김명환	익산시 역사 왜곡 방지 및 바로 알리기 위한 토론회 건의	역사 왜곡 사실이 확인될 경우 역사분야 전문가 등의 자문 등을 통해 토론회 개최 필요성 검토 예정임을 회신
	익산목발 노래보존회	익산 목발노래 전수관 건립 등 지원요청	우리시 재정여건 등 전반전인 사항에 맞춰 순차적인 중장기 계획을 가지고 검토하고 있음을 회신
	송옥섭	천호동굴에 대한 개발 촉구	문화재청 및 관계전문가 현지조사 결과에 따라 주변에 초지를 조성하여 동굴 자생 여건 회복중이며 문화재청 천연동굴 보존관리 지침에 따라 5년마다 정기 실태조사를 실시하여 동굴 생태파악과 개방가능성 등을 적극 검토 계획하고 있음을 회신 (2017년 정기점검 예정)

8. 기금 운용 관련사항

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		전영수	□

해  당  없  음

9. 위원회(자문위원회 포함) 운영 관련

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	고도육성계장		김대영	□
		문화재시설계장		배 석 희	□

□ 위원회 설치 및 운영현황                               (단위: 천원)

위 원 회 명	설치근거	위원장	구성원수	기능 구분	운영횟수	예 산 현 황
						운영예산	위원수당 지급내역	불용예산 현 황
계	2개		26
익산시 향토유적 심의 위원회	익산시 향토유적 보호조례 제3조	부시장	11	심의	1	630	490	140
익산시 고도 보존육성지역 심의위원회	익산시 고도보존 육성 및 주민지원에 관한 조례 제5조	김선기	15	심의	6	3,500	3,500	0

□ 익산시향토유적심의위원회 위원 명단

직 위	성 명	선임일자	소속 또는 주소	직 위	성 명	선임일자	소속 또는 주소
위원장	한웅재	당연직	부시장	위 원	김정희	2015.4.1	원광대 고고미술사학과교수
위 원	이수근	당연직	문화산업국장	〃	전경미	〃	예원대 문화재학부교수
〃	이다운	2015.4.1	원광대 역사교육과 교수	〃	홍승재	〃	원광대 건축공학부 교수
〃	안승모	〃	원광대 고고 미술사학과 교수	〃	임홍낙	〃	익산고등학교교감 (향 토 사)
〃	김선기	〃	원광대 박물관 학예연구팀장	〃	배병선	〃	국립부여문화재 연구소장
〃	남해경	〃	전북대 건축공학부교수

□ 익산시 고도보존육성지역심의위원회 위원 명단

직 위	성 명	선임일자	소속 또는 주소	직 위	성 명	선임일자	소속 또는 주소
위원장	김선기	2014.9.11	원광대 박물관 학예연구팀장	위 원	홍승재	2014.9.11	원광대 건축공학부교수
부위원장	김현숙	〃	전북대 도시계획 교수	〃	이다운	〃	원광대 역사교육과 교수
위 원	김연식	〃	익산시의회 의원	〃	윤충열	〃	원광대 건축학과 교수
〃	송호진	〃	익산시의회 의원	〃	오민근	〃	CRCG 대표
〃	민두희	〃	고도보존 주민협회장	〃	명 현	〃	전북대 환경조경디자인학과 교수
〃	이충용	〃	구 금마면 이장협의회장	〃	이경찬	〃	원광대 도시공학과 교수
〃	이준기	〃	구 금마면 번영회회장	〃	송일섭	〃	(주)인우건설 대표
〃	김옥수	〃	금마면 주민자치위원회 위원장

10. 용역사업 관련

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		전영수	□
		고도육성계장		김 대 영	□
		문화재시설계장		배 석 희	□

□ 사업조서

(단위 : 천원)

구 분	사 업 명	용역업체	용역비	계약방법	추진사항
계	9개 사업		969,205
학술연구 용역	세계문화유산 등재 스토리텔링 조사연구 용역	원광대학교 산학협력단	47,750	수의계약	완료 (2014.4.30.)
민간위탁 용역	2013 고도육성기반구축	(재)전북문화재 연구원	143,236	제한경쟁	완료 (2014.6.24.)
민간위탁 용역	2014 고도육성기반구축	(재)전북문화재 연구원	148,665	제한경쟁	용역추진 (2014.5.26.~ 용역일시중지중)
학술연구용역	익산고도보존육성 시행계획 적정성 재검토 조사용역	(재)전북발전 연구원	34,000	수의계약	완료 (2014.3.17.)
기술용역	이주단지조성을 위한 개발계획 수립 및 실시설계용역	㈜인우,전북대학교산학협력단	192,113	협상계약	완료 (2013.11.12.~ 2014.7.28.)
기술용역	옥룡천 옛물길 회복사업 하천기본계획 변경 및 실시설계용역	㈜삼안,(주)도영 건설엔지니어링	312,796	제한경쟁	완료 (2015.2.16.)
기술용역	옥룡천 하천기본계획 변경수립을 위한 전략환경영향평가용역	㈜동운	18,595	일반경쟁	완료 (2014.3.25)
기술용역	옥룡천 옛물길 회복사업 소규모환경 영향평가용역	㈜동운	25,000	일반경쟁	완료 (2015.2.16)
기술용역	옥룡천 옛물길 회복사업에 따른 옥룡천 주변 도시관리계획 변경용역	㈜주한건설 엔지니어링	47,050	일반경쟁	완료 (2015.2.16)

11. 각종 민간사회단체 보조금지원 관련

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		전영수	□

해  당  없  음

12. 인․허가 민원처리 관련사항

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	고도육성계장		김 대 영	□

○ 고도지구내 행위허가

구분	허가 신청				처리 결과								비고
	계	신축	증축	기타	계		신축		증축		기타
					허가	불허가	허가	불허가	허가	불허가	허가	불허가
2014	8	4	3	1	7	1	4		2	1	1

13. 각종공사 설계 변경상황

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	문화재시설계장		배 석 희	□

(단위 : 천원)

일자	사업명	계약액	변경액	증 감	계약자	공사기간	변경사유등
계	20개 사업	2,787,077	3,011,427	224,350
2014.3.14	여산숲정이 순교성지 주변정비공사	122,620	181,878	59,258	(주)다온	2013.10.14~ 2014.03.27	폐기물처리 및 법면보강추가
2014.5.12	함열향교 대성전 주변정비공사	21,975	24,787	2,812	(주)다온	2014.04.07~ 2014.05.16	부식목재추가교체
2014.5.14	여산향교 대성전 주변정비공사	18,562	18,910	348	(주)다온	2014.04.09~ 2014.06.07	토공사 변경 보수구간 추가
2014.5.14	소세양신도비 보수공사	19,748	20,070	322	㈜다온	2014.04.09.~ 2014.06.07	현장자문에 따라 철거물량 변경
2014.6.02	2013년 왕궁리유적 정비공사	739,551	806,688	67,137	㈜장청 종합건설	2013.08.19.~ 2014.06.13	문화재청 기술지도 추가반영
2014.6.02	태봉사 삼존석불 주변정비공사	29,500	34,647	5,147	㈜다온	2014.04.09.~ 2014.07.07	부식목재 교체추가
2014.6.02	용안향교 대성전 보수공사	15,921	14,622	△1,299	(유)대창건설	2014.04.09.~ 2014.06.07	현장자문에 따라 담장기초공사제외
2014.6.23	익산 춘포리 구일본인농장가옥정비공사	8,455	8,341	△114	㈜다온	2014.05.26.~ 2014.06.24.	현장자문에 따라 공사내용 변경
2014.7.14	이배원가옥 보수정비공사	73,446	83,946	10,500	㈜청광 건설	2014.04.24.~ 2014.07.22	부식목재 교체추가
2014.7.17	익산 입점리고분 호우피해복구 사업(4차)	154,398	179,398	25,000	(유)남전종합건설	2014.05.21.~ 2014.09.17	웅덩이 정비구간 공사추가
2014.7.30	익산향교 대성전 보수정비공사	74,716	89,416	14,700	㈜청광 건설	2014.04.18.~ 2014.08.15	현장자문에따라 담장보수공사 추가
2014.7.30	김안균가옥 보수정비공사	103,060	134,260	31,200	(유)금경 종합건설	2014.05.14.~ 2014.09.29	부식목재 교체추가
2014.8.12	성당면 은행나무 외 3개소 방제 및 유지관리	2,662	2,236	△426	㈜전북 나무병원	2014.05.21.~ 2014.10.17	방제개소 감소
2014.8.14	심곡사 명부전 지장보살좌상 및 권속 보존 처리공사	38,018	57,918	19,900	한림보존테크	2014.03.31.~ 2014.08.27	흰개미발견에 따라 긴급 훈증추가
2014.9.14	왕궁리유적 주변정비공사	139,350	146,027	6,677	㈜동강 종합건설	2014.08.13.~ 2014.09.25	현장고증에따라 전돌수량추가
2014.10.20	원불교 익산성지 보수정비공사	114,969	124,549	9,580	대창건설	2014.07.07.~ 2014.09.23	부식목재 교체추가
2014.11.7	익산 천호동굴 주변정비공사	49,577	35,385	△14,192	세창 산업(주)	2014.08.18.~ 2014.11.15	현장자문결과에 따른 물량감소
2014.11.25	익산 제석사지 정비	382,573	367,430	△15,143	㈜다온	2014.07.21.~ 2014.12.17	문화재청 기술지도 내용반영
2014.12.18	2014년 왕궁리 유적정비	669,966	671,172	1,206	(유)남전종합건설	2014.07.21.~ 2015.02.11	문화재청 기술지도 내용반영
2014.12.24	익산 천호동굴 주변정비공사	8,010	9,747	1,737	(유)국제건설	2014.12.08.~ 2015.01.01	현장조사결과에 따른 물량추가

14. 건설공사 집행 현황(3천만원 이상)

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	문화재시설계장		배 석 희	□

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 내 용	사업비	집행액	잔 액	추진사항	비고
계	15개 사업	4,556,104	2,596,375	1,959,729
왕궁리유적 정비	동측 및 서측 궁장정비	796,870	413,248	383,622	2014년분 보수정비완료(2014.7~2015.4)	계속비 이월
제석사지 정비	유구정비	450,000	302,969	147,031	유구정비완료 (2014.7~12)	계속비 이월
익산향교 대성전 정비	대성전 보수	100,000	99,222	778	완료
심곡사 명부전 지장보살좌상 및 권속 정비	불상 및 권속 보존처리	50,000	50,000	0	완료
여산숲정이 순교성지 정비	주차장 아스콘 포장 및 토지매입	104,000	70,181	33,819	주차장 포장완료 (2013.10~2014.4)	명시 이월
김안균가옥 정비	창고동 해체보수	137,504	137,504	0	완료
태봉사 삼존석불 정비	삼성각 및 종각 보수	30,000	30,000	0	완료
이배원가옥 정비	지붕 해체보수	95,000	93,176	1,824	완료
원불교 익산성지정비	종법실 보수	316,913	236,080	80,833	완료
익산 연동리 석조여래좌상 정비	대웅전, 삼성각, 종각 보수	130,000	90,713	39,287	완료
익산 입점리 고분 정비	고분군 보수	200,000	193,625	6,375	완료
익산 숭림사 보광전 정비	수로정비 요사채단청	120,000	117,354	2,646	완료
자명사 정비	승방단청보수	79,478	77,912	1,566	완료
심곡사 정비	방재시스템 구축	196,339	191,354	4,985	완료
익산 중요무형문화재 통합 전수관 건립	전수관 건립	1,750,000	493,037	1,256,963	공사추진 (2014.10~2016.12)	계속비 이월

15. 민간에 대한 보조금 집행 내역

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		전영수	□
		고도육성계장		김대영	□
		문화재시설계장		배 석 희	□

(단위 : 천원)

단 체 명	사 업 명	예 산 액	집 행 액	잔 액	비 고
합 계	6개 단체 / 12개사업	240,248	237,858	2,390
한국고대사학회	이천년 역사고도 익산의 정체성 확립 학술회의	30,000	30,000	0
대한국토도시계획학회	익산 문화도시 및 창조거점 도시 육성 학술심포지엄	20,000	20,000	0
(사)익산고도육성세계유산보전관리주민협의회	익산고도육성·세계유산 보전관리 주민협의회 운영	24,000	23,958	42
	고도 경관 환경정화사업	30,000	27,652	2,348
이리농악 보존회	이리농악 후계자양성 강사수당	60,000	60,000	0
	이리농악전수교육관 운영	10,248	10,248	0
	이리농악 전수교육관 활성화사업	6,000	6,000	0
	대한민국 농악축제	4,000	4,000	0
이리향제 줄풍류보존회	이리향제줄풍류 후계자양성 강사수당	30,000	30,000	0
	이리향제줄풍류 전수교육관 운영	10,000	10,000	0
익산기세배보존회	익산기세배 전수교육관 운영	10,000	10,000	0
	익산기세배 전수교육관 활성화사업	6,000	6,000	0

▣ 보조금 지원 책정 기준 지급근거

◦ 비영리민간단체지원법 제6조

◦ 고도 보존 및 육성에 관한 특별법 제17조의2

◦ 문화재보호법 제72조

◦ 익산시 보조금 관리에 관한 조례 제6조

16. 국․도비 보조사업 집행현황(1억원이상)

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	고도육성계장		김 대 영	□
		문화재시설계장		배 석 희	□

(단위 : 천원)

사 업 명	예산액	집 행 액				잔 액	비고
		계	국비	도비	시비
계 (12개 사업)	9,101,846	4,377,611	2,995,569	691,022	691,020	4,724,235
옥룡천 옛물길회복사업 하천기본계획 변경 및 실시설계용역	187,696	187,696	131,387	28,155	28,154	0	완료
이주단지조성 (토지매입비 및 공사비 등)	3,346,524	954,744	668,321	143,211	143,212	2,391,780	공사추진(2015.3~2016.11) 명시이월
왕궁리유적 정비	796,870	413,248	289,274	61,987	61,987	383,622	2014년분 보수정비완료 (2014.7.~2015.4.) 계속비이월
왕궁리유적 발굴조사	700,000	700,000	490,000	105,000	105,000	0	완 료
제석사지 정비	450,000	302,969	212,079	45,445	45,445	147,031	유구정비완료 (2014.07~12) 계속비이월
김안균가옥정비	137,504	137,504		68,752	68,752	0	완료
원불교 익산성지정비	316,913	236,080	165,256	35,412	35,412	80,833	완료
익산 입점리 고분정비	200,000	193,625	135,538	29,044	29,043	6,375	완 료
숭림사 보광전 주변정비	120,000	117,354		58,677	58,677	2,646	완료
심곡사 방재시스템구축	196,339	191,354	95,677	47,839	47,838	4,985	완료
미륵사지 복원 및 정비연구	900,000	450,000	315,000	67,500	67,500	450,000	미륵사지복원기본연구비 집행완료(2015.3.18.) 명시이월
익산중요무형문화재 통합전수관건립	1,750,000	493,037	493,037			1,256,963	공사추진 (2014.10~2016.12) 계속비이월

17. 명시 및 사고이월사업비 집행 내역

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		전영수	□
		고도육성계장		김대영	□
		문화재시설계장		배 석 희	□

□ 명시 및 사고이월 내역 : 11건〔명시 4, 사고 7〕

(단위 : 천원)

사 업 명	이월액	집행액	잔 액	추진율 (%)	준 공 (완료예정일)	추 진 내 역
계	1,239,142	1,157,773	81,369
세계문화유산 스토리텔링조사연구용역	47,750	47,750	0	100	2014.04.30.	용역완료
2013 고도육성기반구축	75,000	68,236	6,764	100	2014.06.24.	용역완료
백제고도 사계절 사진촬영 및 자료집 작성	11,078	11,078	0	100	2014.05.01.	용역완료
익산고도보존육성 시행계획 적정성 재검토 조사용역	34,000	34,000	0	100	2014.03.17	용역완료
이주단지조성1차 기본계획및시설계용역	98,750	93,363	5,387	100	2014.08.20.	용역완료
이주단지조성 (1차)	125,000	125,000	0	100	2014.12.30.	보상완료
옥룡천 고도 옛물길 복원사업	255,008	254,816	192	100	2015.02.16.	용역완료 (용역4건)
문화재구역 토지매입	152,457	124,169	28,288	100	2014.12.30.	보상완료
익산천호동굴 주변정비	252,318	214,603	37,715	100	2014.12.29	정비공사완료
마한관 유물 수장고 증축	100,522	98,851	1,671	100	2014.04.24.	증축공사완료
여산숲정이 순교성지 주변정비공사	87,259	85,907	1,352	100	2014.04.16	정비공사완료

18. 예산전용 사항 및 예비비 집행 현황

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		전영수	□

해  당  없  음

19. 공사 준공기한 연장 내역

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		전영수	□

해  당  없  음

20. 국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		전영수	□

해  당  없  음

21. 국․도비 반납 현황

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	고도육성계장		김대영	□
		문화재시설계장		배 석 희	□

(단위 : 천원)

사 업 명	예산액	집행액	잔 액	반 환 금				시비	비고
				계	국 비	도 비	이자
계	3,750,957	3,541,898	209,059	172,638	140,915	30,739	984	37,405
2012년 국토환경디자인시범사업	150,000	138,799	11,201	12,185	11,201		984		집행 잔액
2013년 문화재 재난방지시스템 구축사업	355,500	243,975	111,525	88,105	78,068	10,037		23,420	집행 잔액
2013년 사회복무요원 운영	4,000	3,232	768	768	768				집행 잔액
2012년 문화재 긴급보수사업	50,000	48,378	1,622	1,622	1,622				집행 잔액
2013년 문화재 종합관리체계구축	84,800	66,668	18,132	17,716	13,676	4,040		416	집행 잔액
2012년 전통사찰 보존정비사업	160,000	155,396	4,604	3,453	2,302	1,151		1,151	집행 잔액
2013년 국가지정문화재 보수정비	2,139,600	2,085,122	54,478	43,878	33,278	10,600		10,600	집행 잔액
2013년 도지정 문화재 보수정비	707,057	703,422	3,635	1,817		1,817		1,818	집행 잔액
2013년 주민편익증진사업 (문화재보수정비)	100,000	96,906	3,094	3,094		3,094			집행 잔액

22. 2014년도 계획사업 중 미착공사업 현황

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		전영수	□

해  당  없  음

23. 2014년도 계획사업 중 유보 및 취소 사업현황

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		전영수	□

해  당  없  음

24. 2014년도 이월사업 중 유보 및 취소 사업현황

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		전영수	□

해  당  없  음

25. 2014년도 예산편성 후 전액 미집행 내역

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		전영수	□

해  당  없  음

26. 소송 사건 현황

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		전영수	□

해  당  없  음

27. 시 홈페이지 접수 민원처리 실태현황

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	문화재시설계장		배석희	□

연번	홈페이지 접수 민원	조치(처리)결과	비고
1	•문화재 탐방관련 불편사항 민원 ▸여산향교, 금마향교, 함라삼부자집, 여산동헌 탐방 시 개방 요청 및 친절도 제고	▸개인 사유 문화재로서 지속적으로 행정지도를 추진하여 불편사항이 발생하지 않도록 조치
2	•쌍릉 소나무 소독 요망 ▸쌍릉 소나무 병충해 예방 요청	▸산림공원과의 협조를 통해 수시로 병충해 방제를 실시하고 있음
3	•보조금 사업 하자보수 건 ▸보조금 사업 하자보수 신청 문의 및 하자보증증권 요청 (용안 자명사)	▸민간자본보조사업의 하자보수는 사업주체인 보조사업자와 건설업체가 상호간 협의하여야 하는 것으로, 시에서는 원만히 해결될 수 있도록 조치
4	•익산향교 탐방관련 민원 ▸익산향교 탐방 시 개방 및 사나운 개가 있어 불편사항 민원	▸개인 사유 문화재로서 개방할 수 있도록 적극 요청 및 지도하고 있는 실정으로 불편사항이 발생하지 않도록 조치
5	•함벽정 경관개선 ▸함벽정 주변 간벌로 경관 개선 요청	▸함벽정 주변 간벌사업이 2013년도에 추진되었으며, 문화재 관련 간벌사업은 문화재 관계전문가의 자문을 통해 단계적으로 추진중임

감사자료 과 요구사항

1. 백제역사유적지구 세계유산 등재 추진실적

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		전영수	□

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 명 : 백제역사유적지구 세계문화유산 등재 추진

◦ 사업기간 : 2007 ~ 2015

◦ 사업내용 : 세계유산 등재신청, 예비실사, 현지실사

◦ 사 업 비 : 497백만원(시비)

□ 추 진 실 적

<세계유산 등재 심사 및 평가>

◦ 세계유산 등재신청서 유네스코 제출         : 2014. 1. 28

▸문화재청 및 외교부 승인 ⇒ 유네스코사무국

◦ 세계유산 해외전문가 초청 예비실사(4회)     : 2014. 4. ~ 8.

◦ 세계유산 현지실사 대비 환경정비           : 2014. 8. ~ 9.

◦ 세계유산 유네스코 현지실사                : 2014. 9. 19.

◦ 세계유산 자문기구(이코모스) 등재권고 평가  : 2015. 5. 04.

<세계유산 등재 기반 구축 및 홍보>

◦ 익산역사유적지구 스토리텔링 조사연구 용역 : 2013. 10. ~ 2014. 4.

◦ 세계유산보존관리사업단 설립지원 조례 제정 : 2014. 3. 14.

◦ 세계유산 등재 기획홍보 등                 : 2014. 3. ~ 6.

□ 금 후 계 획

◦ 세계유산 등재 최종 결정(제39차 세계유산위원회/독일) : 2015. 7. 04.

▸총회기간 : 6. 28. ~ 7. 8. / 익산시 참석기간         : 7. 2. ~ 7. 6.

◦ 세계유산 등재 기념행사 개최(인증서 전달식 등)       : 2015. 9.

2. 고도육성 기반구축사업 추진실적

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		전영수	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2014. 1. ~ 2015. 8.

◦ 사 업 비 : 148백만원 (국비 104  도비 22  시비 22)

◦ 사업내용

▸고도육성 아카데미 운영 : 아카데미 강좌, 전통공예교실 등

▸고도육성 포럼 운영 : 전문가 포럼을 통해 고도육성사업 방향 제시 등

▸문화재대관 발간 : 익산의 유․무형 역사문화 유산을 총괄한 도록 발간

▸고도육성 홍보 계간지 발간 : 고도육성사업, 익산문화재 등 소개 및 홍보

□ 추 진 실 적

◦ 고도육성 아카데미 운영                      : 2014. 6. ~ 2015. 1.

▸아카데미 강좌(11강좌, 수료 29명, 국내 선진사례지 답사 2회)

▸전통공예교실 운영 : 도자․한지․양초․서각 공예 (각15회, 20명씩)

◦ 고도육성 전문가 포럼 및 워크숍              : 2014. 7. ~ 11.

▸포럼 1회, 워크숍 1회

◦ 고도 홍보 계간지 발간 및 배포               : 2014. 7. ~ 2015. 2.

▸3회 발간 : 여름호(2014. 9), 가을호(2014. 11), 겨울호(2015. 2)

◦ 문화재대관 편집회의 및 수정                 : 2014. 7. ~

□ 금 후 계 획

◦ 문화재대관 발간 및 배포                     : 2015. 7. ~ 8.

3. 옥룡천 옛물길 회복사업 추진실적

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	고도육성계장		김 대 영	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2012. 3. ~ 2016. 12.

◦ 총사업비 : 13,800백만원 (국비 9,660  도비 2,070  시비 2,070)

◦ 사 업 량 : L=1.4㎞ (금마저수지 ~ 지방도720호)

◦ 사업내용 : 하천정비, 산책로 및 천변공원조성, 교량설치 등

□ 추 진 실 적

◦ 옥룡천 전략환경영향평가 용역 완료     : 2013.  4. 23. ~ 2014. 3. 25.

◦ 하천기본계획변경 및 실시설계용역 완료	: 2013.  5. 15. ~ 2015. 2. 16.

◦ 옥룡천 주변 도시관리계획 변경용역 완료	: 2013. 11. 08. ~ 2015. 2. 16.

◦ 옥룡천 소규모 환경영향평가용역 완료   : 2013. 11. 13. ~ 2015. 2. 16.

◦ 옥룡천 일부구간(천변공원) 보상 추진    : 2014. 10. ~

□ 금 후 계 획

◦ 옥룡천 옛물길 회복사업 보상협의 추진  : 2015.  6. ~

◦ 옥룡천 옛물길 회복사업 공사 발주      : 2015. 하반기

4. 이주단지 조성사업 추진실적

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	고도육성계장		김 대 영	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2012. 7. ~ 2016. 12.

◦ 총사업비 : 7,700백만원(국비 5,390, 도비 1,155, 시비 1,155)

◦ 조성규모 : 23,881㎡ (택지 38필지, 공공용지 1필지)

◦ 사업내용 : 이주단지 부지 및 기반시설(도로, 상․하수도 등) 조성

□ 추 진 실 적

◦ 추진계획보고 및 공유재산관리계획 승인        : 2013. 4. ~ 2013. 5.

◦ 1차 이주대상자 주민공청회 추진               : 2013. 5. 14.

◦ 이주단지 조성사업구간 보상 추진              : 2013. 5. ~

▸편입토지 : 37필지 / 21,251㎡, 지장물 : 19건

▸협의완료 : 26.5필지 / 18,392㎡ 지장물 12건 협의(86.5%)

◦ 이주단지 개발계획 수립 및 실시설계용역 시행  : 2013. 11. ~ 2014. 7.

◦ 이주단지 문화재 관련조사 시행                : 2013. 12. ~ 2015. 2.

□ 금 후 계 획

◦ 이주단지 조성 공사 추진                      : 2015. 3. ~ 2016. 12.

5. 문화유산 보존정비 현황

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	문화재시설계장		배석희	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2014. 1. ~ 2014. 12.

◦ 총사업비(29건) : 5,050백만원 (국비 2,925 도비 1,062 시비 1,063)

구 분	내 용	사업비(백만원)	비 고
계	29건	5,050
국비보조사업	왕궁리유정 정비 등 (10건)	3,980
도비보조사업	익산향교 대성전 정비 등 (17개소)	792
기타사업	자명사 보수정비 등 (2건)	278

□ 추 진 실 적

◦ 국비 및 도비 보조사업 사업지침 확정             : 2014. 1.

◦ 목조문화재 안전점검 (20개소) 및 소방훈련 (4개소)   : 2014. 3. ~ 5.

◦ 문화재청 및 전북도 설계승인 추진                : 2014. 4. ~ 5.

◦ 추진상황

(단위 : 건)

구 분	건수	내 용
계	29
공사완료	28	원불교익산성지, 연동리 석조여래좌상, 입점리고분, 춘포리 구 일본인 농장가옥, 숭림사 보광전, 왕궁리유적, 제석사지, 미륵사지, 왕궁리오층 석탑, 익산향교 대성전, 심곡사 명부전, 이병기선생 생가, 여산숲정이 순교성지, 김안균가옥, 여산동헌, 태봉사 삼존석불, 두동교회 구 본당, 여산향교 대성전, 함열향교 대성전, 용안향교 대성전, 미륵산성, 망모당, 성당면 은행나무, 이배원 가옥, 익산목발노래 전수관, 소세양 신도비, 자명사, 심곡사
계속사업 지속추진	1	익산 나바위성당

◦ 보수정비시행 추진                               : 2014. 4. ~ 12.

□ 문화재 보수정비 사업

(단위 : 백만원)

구분	문 화 재 명 (사업명)	사업내용	사 업 비	추 진 사 항
				설계중	설계승인	공사중	완 료
계	29개 사업		5,050			1	28
국가지정문화재	10개 사업		3,980
	원불교 익산성지 정비	종법실 보수	320				⚪
	익산 나바위성당 정비	종합정비계획수립 정밀안전진단	200			⚪
	연동리 석조여래좌상 주변정비	대웅전, 삼성각, 종각 기와번와보수	130				⚪
	입점리고분 정비	고분군 보수	200				⚪
	춘포리 구 일본인 농장가옥 정비	내부벽체 복원	10				⚪
	숭림사 보광전 주변정비	수로정비, 요사채 단청	120				⚪
	왕궁리유적 정비	발굴조사 동측 및 서측궁장정비	1,500				⚪
	제석사지 정비	유구정비	450				⚪
	미륵사지 정비	미륵사지 복원 기본연구	900				⚪
	왕궁리오층석탑정비	왕궁리오층석탑보존처리	150				⚪
도지정문화재	17개 사업		792
	익산향교 대성전 정비	대성전등 건물보수, 진입로포장, 안내판정비	100				⚪
	심곡사명부전 지장보살 및 권속 정비	불상 및 권속 보존처리	50				⚪
	이병기선생생가 정비	초가이엉잇기 및 배수로설치	20				⚪
	여산숲정이 순교성지 주변정비	주차장 아스콘포장 및 토지매입	104				⚪
	김안균가옥 정비	비각 지붕보수 및 창고동 해체보수	140				⚪
	여산동헌 정비	지붕 번와보수	30				⚪
	태봉사 삼존석불 주변정비	삼성각 및 종각 지붕 번와보수	30				⚪
	두동교회 구 본당 정비	구본당 회벽바르기 및 창호보수 소나무정비, 안내판 설치	25				⚪
	여산향교 대성전 주변정비	담장보수, 협문보수, 법면보수	30				⚪
	함열향교 대성전 주변정비	영소전 기단보수, 내삼문 회벽바르기, 안내판정비	30				⚪
	용안향교 대성전 주변정비	대성전 기와고르기, 관리사 회벽바르기, 담장보수	30				⚪
	미륵산성 종합정비계획 수립	종합정비계획 수립	50				⚪
	망모당 정밀실측	정밀실측조사	30				⚪
	성당면 은행나무 정비	문화재 안내판 정비	5				⚪
	이배원가옥 정비	지붕 해체보수	95				⚪
	익산목발노래 전수관 보수	전수관 창호 및 내부보수	3				⚪
	소세양신도비 주변정비	전통담장 설치	20				⚪
기타	2개 사업		278
	자명사보수정비	승방단청보수	80				⚪
	심곡사 방재시스템 구축	방재시스템 구축	198				⚪

6. 익산 중요무형문화재 통합전수관 건립 추진실적

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	문화재시설계장		배석희	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2013 ~ 2016

◦ 위    치 : 모현동 모인근린공원 일원 (김동문 배드민턴장 인접)

◦ 규    모 : 연면적 3,919.45㎡ (지상2층 지하1층)

▸제11-3호 이리농악, 제83-2호 이리향제줄풍류, 시립국악원(시립풍물단 포함) 통합 건축

◦ 사 업 비 : 8,200백만원 (국비 3,300, 도비 2,450, 시비 1,950, 특별교부세 500)

구분	계	2012	2013	2014	2015	2016
계	8,200	800	600	2,250	1,670	2,880
통 합 전수관	6,600 (국3,300 도1,650 시1,650)		600 (국300 도150 시150)	1,750 (국1,350 도200 시200)	1,370 (국500 도435 시435)	2,880 (국1,150 도865 시865)
시 립 국악원	1,600 (특별교부세500 도800 시300)	800 (도800)		500 (특별교부세 500)	300 (시300)

※ 당초 시립국악원과 이리농악+이리향제줄풍류 건립을 각각 추진중에 있었으나 통합하여 건립하는 것이 예산투자 및 공유재산 운영 측면에서 바람직함(익산시 투융자심사)

□ 추 진 실 적

◦ 전북도 지방재정투융자 심사완료                 : 2012.  7. 13.

◦ 의회 공유재산관리계획 승인                     : 2012. 12. 20.

◦ 건립 자문위원회 구성 및 운영                   : 2013. 3. ~ 12.

▸참여단체, 교수, 전문가 등으로 구성하여 의견수렴 및 거버넌스 구현

◦ 전통문화 랜드마크 건축을 위한 설계공모 추진    : 2013. 6. ~ 12.

◦ 전북도의 공사비 검토 및 문화재청 설계심사 완료 : 2014. 4. ~  6.

◦ 공사 착공                                      : 2014. 10. 08.

□ 금 후 계 획

◦ 공사 준공(연차 예산 확보하여 장기계속사업 추진) : 2016. 12.