건   설   과

	□		감사자료 과 공통사항
			1.	2014 업무성과 및 반성	57
			2.	2014 예산집행 및 추진사항	58
			3.	2014년도 행정사무감사시 지적사항에 대한 조치 결과	60
			4.	2014년도 상급기관 감사시 지적사항 및 조치 결과	62
			5.	시정질문에 대한 조치 결과	63
			6.	주요사업 조서(3천만원 이상)	64
			7.	2014년도 각종 민원(진정․건의․청원 등) 접수 처리내역	65
			8.	기금 운용 관련	66
			9.	위원회(자문위원회 포함) 운영 관련	66
			10.	용역사업 관련	67
			11.	각종 민간사회단체 보조금지원 관련	68
			12.	인․허가 민원관련	68
			13.	각종공사 설계 변경상황	69
			14.	건설공사 집행 현황(3천만원이상)	70
			15.	중소기업진흥 및 제품 구매 촉진에 관한 법률에 의한 물품구입현황 (3천만원이상)	72
			16.	민간에 대한 보조금 집행 내역	72
			17.	국․도비 보조사업 집행현황(1억원이상)	73
			18.	명시 및 사고이월사업비 집행 내역	74
			19.	예산전용 사항 및 예비비 집행 현황	75
			20.	공사 준공기한 연장 내역	75
			21.	국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황	76
			22.	국․도비 반납 현황	76
			23.	2014년도 계획사업중 미착공사업 현황	77
			24.	2014년도 계획사업중 유보 및 취소된 사업현황	77
			25.	2014년도 이월사업중 유보 및 취소된 사업	78
			26.	2014년도 예산편성후 전액 미집행 내역	78
			27.	소송 사건 현황	79
			28.	시홈페이지에서 접수된 민원처리 현황	80
			29.	각종 보조금 지급 내역	81

	□		감사자료 과 요구사항
				1.	공익사업을 위한 용지보상
				2.	2014년도 시군도·농촌도로 확·포장사업 공사추진사업장 중 예산 미확보사업(이월및계속사업) 2014년도 준공된 사업현황 2014년도 신규사업현황
				3.	철도건널목입체화사업
				4.	산북천하천환경정비사업
				5.	소하천환경정비사업
				6.	국가하천유지관리사업
				7.	도로조명시설조도개선
				8.	도로조명고장민원처리내역
				9.	익산I.C~팔봉간 지방도 확·포장
				10.	국도및국도대체우회도로
				11.	하천기본계획용역
				12.	가로등시설실명제추진
				13.	2014 읍면동별 가로등 보안등 신규설치현황

감사자료 과 공통사항

1. 2014 업무성과 및 반성

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	건설행정계장		박 종 환	□
작성자	:	도로시설계장		권 수 헌	□
작성자	:	하천시설계장		유 원 향	□
작성자	:	하천관리계장		최 선 우	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

□ 성    과

□ 공익사업을 위한 용지 적극 협의보상으로 조기 착공에 기여

▸ 사업지구 42개소 (계속사업 33개소, 신규사업 9개소)80%협의완료

▸ KTX역사 진입로 용지등 보상 85%협의, 미협의자 수용재결 완료

▸ 함열용성 철도건널목 입체화공사  미협의자 공탁 완료

□  철도건널목을 입체화하여 철도사고예방과 지역주민의 교통안전 및 주민          생활편익 증진에 기여

▸함열용성 철도 건널목 입체화사업 준공식 개최  :  2014. 12월 02일

□ 자연과 생명이 살아 숨쉬는 친환경을 우선으로 하는 하천 정비로 재해예방 및        시민 친수공간 조성

▸ 산북천 하천환경정비사업 :  4차분 2014. 6월 사업완료

▸ 소하천 하천환경정비사업

- 택촌천 : 2014. 8월 사업완료

- 신평천 : 교량 2개소 설치, 호안정비 300m완료(공정율 30%)

□ 보안등 설치로 밝은거리 조성하여 여성,노약자 등에게 안전한 보행 환경조성

▸보안등 신규설치 389개소중 421개소(108%)

▸노후가로등 정비 160개소중 168개소(105%)

▸가로등,보안등 민원처리 3,773건

2. 2014 예산집행 및 추진사항

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	건설행정계장		박 종 환	□

2014 12. 31현재                                                                (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율 (%)	비고
건설과				17,914,459	15,698,814	2,215,645	88	본예 12,510 이월 5,404
	도로시설관리			9,320,703	7,759,873	1,560,830	83
		시군농어촌도로확포장		1,495,879	398,099	1,097,780	27
			함라수동~금곡간 도로확포장공사	390,000	28,068	361,932	7	명시이월
			여산신리호월간 도로확포장공사	73,000	34,213	38,787	47	명시이월
			미불용지매입비 (시군도농어촌도로)	84,000	73,562	10,438	88
			성당삼회선(성당우회도로) 도로확포장공사	518,000	17,868	500,132	3	명시이월
			오산북영선(금몽~남전)확포장공사	219,179	62,113	157,066	28	사고이월
			함열용왕교차로~ 삼기일반산업단지	211,700	182,275	29,425	86
		철도건널목개량사업		4,696,570	4,281,325	415,245	91
			함열철도건널목 입체화사업	2,623,039	2,245,519	377,520	86	계속사업
			황등철도건널목 입체화사업	2,073,531	2,035,806	37,725	98	계속사업
		도로조명시설관리		3,088,534	3,040,729	47,805	98
			보안등신규설치	420,050	374,711	45,339	89	명시이월
			노후가로등정비	125,000	124,573	427	99
			가로등보안등유지관리	2,444,414	2,444,324	90	99
			가로등보수차량 운영유지비	20,870	20,715	155	99
			주민편익증진사업보안등(보조)	78,200	76,406	1,794	98	도비보조사업

2. 2014 예산집행 및 추진사항

2014. 12. 31현재                                                              (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율 (%)	비고
		주민숙원사업		39,720	39,720	0	100
			주민숙원사업	39,720	39,720	0	100	공통여비및업무추진비
	하천정비			7,991,727	7,346,922	644,805	92
		하천정비및유지관리		7,991,727	7,346,922	644,805	92
			하천제방유지보수	64,000	59,413	4,587	93
			하천제방유지보수(자체)	26,228	7,147	19,081	27
			소하천정비	2,965,056	2,927,490	37,566	99	명시이월
			산북천하천환경정비사업	4,318,458	3,883,089	435,369	90	계속사업
			지방하천기본계획수립	254,860	233,234	21,626	92	명시이월
			국가하천유지관리	363,125	236,549	126,576	65	명시이월
	하천재해정비사업			537,713	533,921	3,792	99
		재해예방사업		537,713	533,921	3,792	99
	재무활동(보전지출)			3,730	3,693	37	99
	행정운영경비			60,586	54,405	6,181	90
		인력운영비		35,000	28,819	6,181	82
		기본경비		25,586	25,586	0	100

3. 2014 행정사무감사 사항 조치결과

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	건설행정계장		박 종 환	□
작성자	:	도로시설계장		권 수 헌	□
작성자	:	하천시설계장		유 원 향	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

연번	시정․개선사항	조치 (처리) 결과	비고
1	•산북천 하천 환경정비사업 ▸하천은 하천의 기능을 하면 되는데 산북천 하천정비사업 내용을 보면 하천에 불필요한전망대나 테크 등이 계획되어 있으므로 이러한 시설물 설치는 지양하기 바람.	▸ 2013. 5월 전라북도 특정감사 조치사항에 따라 조경시설물 등을 삭제 하였으며 하천본래의 치수 기능에 부합하도록 추진 계획임.	김정수
2	•가로등 및 보안등 유지관리 ▸가로등 및 보안등 설치 후 사후관리와 전력비용이 증가하여 시재정 압박요인으로 작용하고 있는 바 가로등 총량제 등을 실시하여 불필요한 가로등 및 보안등은 철거하여 사후관리를 철저히 하기 바람. ▸가로등 유지관리에 많은 비용이 드는데 효율적인 유지관리를 위하여 원격제어장치 설치를 검토하기 바람.	▸주민들과 협의하여 불필요한 가로등 및 보안등을 철거할 수 있도록 하겠으며, 총량제를 도입하여 추진하도록 하겠으며, 총량제를 도입하여 추진하도록 노력 하겠음. ▸가로(보안)등은 우리시 무선국에서 일괄 점.소등이 이루어지며, 원격으로 고장개소 위치확인 시스템은 교체시 많은 예산(10억정도)이 소요되여 예산확보에 어려움이 있음.	강경숙 조남석

연번	시정․개선사항	조치 (처리) 결과	비고
3	•용연선 기반조성 ▸오산 용연선 가로등은 당초 계획에 포함하여 설치하여야 함에도 사업게획이 잘못되어 설치하지 않은 것으로 판단되므로 사업계획을 수립할 때 주의하기 바람.	▸예산편성시 예산부서에 효율적인 사업성을 고려 검토 건의 하겠으며, 도로개설사업 예산확보에 적극 노력 하고 있음.	박철원
4	•평화육교 재가설 ▸평화육교 재가설에 대한 국가예산 확보가 가능할 것으로 보이는데 보수비용을 지원받은건 행정의 소통부재이므로 주의하기 바라고 국비지원에 따른 시비를 확보하여 추진하기 바람.	▸총사업비 약 498억원중 국비 307억원은 기재부 총사업비 변경승인을 2015. 4. 6일 확정하였으며, 시비 190억원은 연차적으로 확보하여 사업추진에 차질없도록 노력하겠음.	박철원
5	•익산IC~팔봉간 지방도 확·포장 ▸익산 왕궁에 국가식품클러스터가 조성되므로, 시내에서 국가식품클러스터까지 차량통행이 급증할 것으로 예상되는 바 교통불편을 최소화 함은 물론 국가식품클러스터 내 유입인구가 타 지자체로 빠져나가지 않도록 익산 I.C 진입도로를 조속한 시일내에 완공하기 바람.	▸익산IC 진입도로는 총 8.6km중 익산시(도시개발과) L=2.5km, 전북도 L=4.6km, 국토교통부(익산지방국토관리청)L=1.4km로 3개기관이 구간별 연차별사업 시행중이며, 사업의 중요성을 감안 적기에 추진될수 있도록 협의에 만전을 기하겠음.	김용균

4. 2014 상급기관감사 지적사항에 대한 조치 결과

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	건설행정계장		박 종 환	□
작성자	:	도로시설계장		권 수 헌	□
작성자	:	하천시설계장		유 원 향	□
작성자	:	하천관리계장		최 선 우	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

연번	공 사 명	지적사항	조치 (처리) 결과	수감기관	비고

상급기관감사 지적사항이 없습니다.

5. 시정질문에 대한 조치결과

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	건설행정계장		박 종 환	□
작성자	:	도로시설계장		권 수 헌	□
작성자	:	하천시설계장		유 원 향	□
작성자	:	하천관리계장		최 선 우	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

시정질문에 대한 사항이 없습니다.

6. 주요사업 조서(3천만원 이상)

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	도로시설계장		권 수 헌	□
작성자	:	하천시설계장		유 원 향	□
작성자	:	하천관리계장		최 선 우	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

항목 14. 건설공사 집행현황과 같습니다.

7. 2014년도 각종 민원 접수처리내역

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	건설행정계장		박 종 환	□
작성자	:	도로시설계장		권 수 헌	□

종류	건 명	민원인	요구내용	처 리 내 용
계	7건
진정	나무 이식 요청	이용환	도로매입지에 식재된 나무가 미관상 좋지 않으므로 이식 요청	나무 이식 처리 완료 통보
진정	호남선 공사로 인한 건물 균열에 따른 보상 요구	김용보	호남선(함열~황등간) 건널목 입체화 공사로 인한 건물 균열에 따른 보상 요구	호남선(함열~황등간) 건널목 입체화 공사 시행자인 한국철도시설공단에 민원서 이첩하여 처리하도록 하고 민원인에게 회신 및 전화 통보
진정	도로 확장 요구	김학조	익산시 오산면 무왕로2길 대인사 옆 도로 확장 요구	사업의 우선순위와 지방재정 여건 등을 감안하여 검토 할 계획임을 통보
진정	ktx서부역사 진입로 영업보상 및 주거 이전비 보상요구	김창갑	어울림안마원은 4차선대로변에 방2,욕실 49㎡이상의 점포를 임차하여 상황에 맞는 이전비를 보상해주기 바람	어울림안마원은 영업이익과 시설이전비용등을 고려하여 영업보상비를 평가하였으며, 주거이전비에 대하여는 안마원은 무허가건축물로 1년이상 거주한 세입자인 경우에만 주거이전비 지급이 가능함.
진정	오산선 담장 보상 요구	박옥주	오산선 담장은 현재 철거로 인해 멸실 되었으나 현실에 맞는 가격으로 재감정 보상요구	담장(공작물)은 용도가 폐지되어 기능이 상실되어 재평가를 할수 없음
진정	ktx 서부역사 진입로 토지,물건,영업보상비 재감정 요구	정진형	토지,물건,영업보상비 현시세에 맞게 재감정 요구	공익사업 및 보상에 관한 법류에 의하면 “1년이 경과하여야 재감정 가능” 현시점에서는 재감정을 할 수 없으나, 수용재결을 위한 재감정은 받을 수 있음
진정	ktx서부역사 진입로 주거이전비 보상요구	이진효	아름드리 꽃집 주거이전비를 보상요구	아름드리 꽃집은 무허가건축물(비닐하우스)의 주거용 건축물에 해당되지 않으며, 건축물소유자가 영업 및 거주할 경우 주거이전비 보상 대상이 아님

8. 기  금   운  영

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	건설행정계장		박 종 환	□
작성자	:	도로시설계장		권 수 헌	□
작성자	:	하천시설계장		유 원 향	□
작성자	:	하천관리계장		최 선 우	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

기금운영 사항이 없습니다.

9. 위 원 회  운 영

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	건설행정계장		박 종 환	□
작성자	:	도로시설계장		권 수 헌	□
작성자	:	하천시설계장		유 원 향	□
작성자	:	하천관리계장		최 선 우	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

위원회 운영 사항이 없습니다.

10. 용   역   사  업

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	도로시설계장		권 수 헌	□
작성자	:	하천시설계장		유 원 향	□

일자	사 업 명	사업개요	예산액	계약액	계약자	납품일자	용역기간	비고
2013.7.15	함열용왕교차로~삼기일반산업단지경계간도로확포장실시설계용역	소규모환경영향평가외 5식	320,000	285,310	㈜태영기술공사외 5개업체	2015.1.19	2013.7.15.~2015.1
2014.3.21	성당 삼회선(성당우회도로)도로확포장공사 실시설계용역	도로확포장 실시설계 1식	18,000	17,868	주식회사 동운	2014.10.16	2014.3.21.~10.16
2014.3.26	지방하천기본계획수립 (고창천, 익산천)	하천기본계획 수립 및 전략환경영향 평가 L=15km)	254,860	233,234	㈜동운 외 1개사	2015.2.24	‘13.3.31~ ‘15.2.24

(단위 : 천원)

11. 각종 사회단체 보조금지원

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	건설행정계장		박 종 환	□
작성자	:	도로시설계징		권 수 헌	□
작성자	:	하천시설계장		유 원 향	□
작성자	:	하천관리계장		최 선 우	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

각종 사회단체 보조금 지원내역이 없습니다.

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	건설행정계장		박 종 환	□
작성자	:	도로시설계장		권 수 헌	□
작성자	:	하천시설계장		유 원 향	□
작성자	:	하천관리계장		최 선 우	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

12. 인․허가민원

인․허가 민원내역이 없습니다.

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	도로시설계장		권 수 헌	□
작성자	:	하천시설계장		유 원 향	□

13. 각종 공사 설계 변경상황

(단위 : 천원)

연번	사업명	예산액	계약액 (변경액)	계약자	계약 일자	변경 일자	공 사 기 간	변경사유
1	함열용성철도건널목 입체화사업 (5차분)	2,623,039	1,005,555 (980,775)	부일건설 (주)	‘14.10.2	‘14.11.20	‘14.10.2~’14.11.22	현장 물량조정 및준공보험료 정산
2	오산북영선 도로확포장공사 (1차분)	219,179	110,000 (79,794)	㈜에버종합건설	‘13.6.7	‘14.5.29	‘13.6.14~ ’14.6.2	현장 물량조정
3	산북천하천환경 정비사업1,2공구 (4차분)	4,318,458	2,588,717 (2,504,344)	㈜동성 송기태, 신신토건(주) 강신길	2014.3.10	2014.6.24	2014.3.10~ 2014.6.30	현장여건에따른 물량변경
4	택촌천소하천 정비공사 (3차분)	1,100,000	1,097,266 (1,037,637)	㈜성웅 종합건설 대표 박영자	2014.2.24	2014.8.21	2014.2.28~ 2014.8.29	현장여건에따른 물량변경
5	신평천소하천 정비공사 (1차분)	808,460	642,000 (717,322)	(유)삼성 종합건설 대표 한웅진	2014.3.9	2014.8.29	2014.3.20 ~ 2014.10.19	현장여건에따른 물량변경

14. 건설공사 집행 현황(3천만원 이상)

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	도로시설계장		권 수 헌	□
작성자	:	하천시설계장		유 원 향	□
작성자	:	하천관리계장		최 선 우	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

(단위 : 천원)

연번	사 업 명	사업량	예산액	집행액	잔액	집행률 (%)	비고
	계	12건	11,855,479	10,427,064	1,428,415	88
1	함열철도건널목 입체화사업	L= 1.58㎞ B= 8~13m	2,623,039	2,245,519	377,520	86
2	황등철도건널목 입체화사업	L= 0.95㎞ B= 15.4m	2,073,531	2,035,806	37,725	98
3	함라 수동~금곡간 도로확포장공사	L=200m, B=8m	390,000	28,068	361,932	7
4	함열용왕교차로~삼기일반산업단지경계간도로확포장실시설계용역	L=3.7km B=16m	211,700	182,275	29,425	86
5	오산 북영선 도로확포장사	L=530m B=8m	219,179	62,113	157,066	28
6	금강생태하천체육시설 및배수로정비공사	배수로L=56m 블록포장A= 400㎡	48,349	48,349	0	100
7	산북천하천환경정비사업	생태하천조성 L=6.64㎞	4,318,458	3,883,089	435,369	90
8	지방하천기본계획수립	익산천, 고창천 기본계획 수립 L=15㎞	254,860	233,234	21,626	92
9	재해예방사업(목천포천상습수해지구하천정비사업)	하천정비 L=2.0km	537,713	533,922	3,791	99

연번	사 업 명	사업량	예산액	집행액	잔액	집행률 (%)	비고
10	소하천정비종합계획(변경)수립	58개소 L=98.55㎞	600,000	600,000	0	100
11	소하천정비	택촌천,신평천 L=2.11㎞	2,365,056	2,327,490	37,565	98
12	보안등신규설치	익산시일원	454,150	450,617	3,533	99
13	노후가로등정비	익산시일원	124,500	124,072	428	99

15. 중소기업 물품구입현황(3천만원이상)

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	건설행정계장		박 종 환	□
작성자	:	도로시설계장		권 수 헌	□
작성자	:	하천시설계장		유 원 향	□
작성자	:	하천관리계장		최 선 우	□
작성자	:	가로등관리게장		안 순 회	□

중소기업 진흥 및 제품 구매 촉진에 관한 법률에 의한 물품구입 내역이 없습니다.

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	건설행정계장		박 종 환	□
작성자	:	도로시설계장		권 수 헌	□
작성자	:	하천시설계장		유 원 향	□
작성자	:	하천관리계장		최 선 우	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

16. 민간에 대한 보조금 집행내역

민간에 대한 보조금 집행내역 없습니다.

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	하천시설계장		유 원 향	□

17. 국․도비 보조사업 집행현황(1억원이상)

(단위 : 천원)

연번	사 업 명	사업량	예산액	집행액	잔 액	집행률 (%)	비 고
	계	3건	6,938,374	6,443,813	494,560	93
1	산북천하천환경 정비사업	생태하천조성 L=6.64㎞	4,318,458	3,883,089	435,369	90
2	지방하천기본 계획수립	익산천, 고창천 기본계획 수립 L=15㎞	254,860	233,234	21,626	92
3	소하천정비	2개하천 L=2.11㎞	2,365,056	2,327,490	37,565	98

18. 명시 및 사고이월사업비 집행내역

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	도로시설계장		권 수 헌	□
작성자	:	하천시설계장		유 원 향	□

(단위 : 천원)

연번	사업명	사업량	예산액	집행액	잔액	집행률(%)	비고
	계	6건	2,240,508	1,054,372	211,449	81
1	함열용왕교차로~삼기일반산업단지경계간도로확포장실시설계용역	L=3.7km B=16m	211,700	182,275	29,425	86
2	오산 북영선 도로확포장사	L=530m B=8m	219,179	62,113	157,066	28
3	지방하천기본 계획수립	익산천 하천 기본계획 수립 L=14㎞	194,860	173,693	21,167	89
4	재해예방사업(목천포천상습수해지구하천정비사업	하천정비 L=2.0km	537,713	533,922	3,791	99
5	소하천정비 종합계획 (변경)수립	58개소 L=98.55㎞	100,000	100,000	0	100
6	소하천정비	택촌천,신평천 L=2.11㎞	977,056	977,056	0	100

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	건설행정계장		박 종 환	□
작성자	:	도로시설계장		권 수 헌	□
작성자	:	하천시설계장		유 원 향	□
작성자	:	하천관리계장		최 선 우	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

19. 예산전용 사항 및 예비비 집행현황

각종 예산전용 및 예비비집행 내역이 없습니다.

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	도로시설계장		권 수 헌	□
작성자	:	하천시설계장		유 원 향	□

20. 공사 준공기한 연장내역

공사준공기한 연장 내역이 없습니다.

21. 국․도비 예산중 사업미시행으로 전액 반납한 현황

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	도로시설계장		권 수 헌	□
작성자	:	하천시설계장		유 원 향	□
작성자	:	하천관리계장		최 선 우	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

국․도비 예산 중 사업미시행으로 전액 반납한 현황이 없습니다.

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	하천관리계장		최 선 우	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

22. 국․도비 반납현황(항목별 반납사유 명시)

(단위 : 천원)

연번	사 업 명	예산액	집행액	반납액	비고
	2건	543,500	539,873	3,627
1	국가하천유지관리보수사업(국비)	538,000	집행:429,512 이월:105,125	3,363
2	금마면,함열읍 가로등 설치사업	5,500	5,236	264

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	도로시설계장		권 수 헌	□
작성자	:	하천시설계장		유 원 향	□
작성자	:	하천관리계장		최 선 우	□

23. 2014년도 계획사업중 미착공사업 현황

(단위 : 백만원)

구분	위치	사 업 명	사 업 개 요 (km, m)	사업 기간	총 사 업 비(백만원)					사업 구분	공정	비고
					계	기투자	2011 이월	2012	금 후 투 자
					해	당	없	음

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	도로시설계장		권 수 헌	□
작성자	:	하천시설계장		유 원 향	□
작성자	:	하천관리계장		최 선 우	□

24. 2014년도 계획사업중 유보 및 취소된 사업현황

2014년 계획사업중 유보 및 취소된 사업이 없습니다.

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	도로시설계장		권 수 헌	□
작성자	:	하천시설계장		유 원 향	□
작성자	:	하천관리계장		최 선 우	□

25. 2014년도 이월사업중 유보 및 취소된 사업

2014년도 이월사업중 유보 및 취소된사업 없습니다

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	도로시설계장		권 수 헌	□
작성자	:	하천시설계장		유 원 향	□
작성자	:	하천관리계장		최 선 우	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

26. 2014년도 예산편성 후 전액 미집행내역

(단위 : 백만원)

구분	위치	사 업 명	사 업 개 요 (km, m)	사업 기간	총 사 업 비(백만원)					사업 구분	공정	비고
					계	기투자	2012 이월	2013	금 후 투 자
					해	당	없	음

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	건설행정계장		박 종 환	□

27. 소 송 사 건  현 황

사건번호	사건명	원 고	피 고	접수일	변호사 선임사항	추진사항 (판,종결일)
익산2014가소16306 (익산시법원)	구상금청구의 소	전국화물자동차운송사업연합회	익산시장	2014.11.17	김종성 변호사	진행중

28. 시홈페이지에서 접수된 민원처리 현황

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	건설행정계장		박 종 환	□
작성자	:	도로시설계장		권 수 헌	□
작성자	:	하천시설계장		유 원 향	□
작성자	:	하천관리계장		최 선 우	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

□ 민원접수 현황

부서명	시 정 에 바 란 다		비고
	접수(건)	처리(건)
건설과	39	39

□ 주요처리현황

◦ 보안등 설치 관련 민원         :  27건

◦ 도로개설 및 확포장 관련 민원  :   9건

◦ 기타 민원                     :   6건

29. 각종 보조금 지급내역(지급대상자 명단)

확인자	:	건설과장		김 용 주	□
작성자	:	건설행정계장		박 종 환	□
작성자	:	도로시설계장		권 수 헌	□
작성자	:	하천시설계장		유 원 향	□
작성자	:	하천관리계장		최 선 우	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

각종 보조금 대상자 없습니다.

감사자료 과 요구사항

1. 공익사업을 위한 용지보상

확인자	:	건 설 과 장		김 용 주	□
작성자	:	건 설 행 정 계 장		박 종 환	□

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 장 : 42개 사업장

(건설과 15, 도시개발과 15, 도로관리과 3, 시민안전과 6, 타기관 3 )

◦ 보상대상 : 1,053필지 , 280,038㎡

◦ 보상금액 : 39,660백만원

□ 추 진 실 적

◦ 토지매입실적 (78%) :   42개소 /   1,801필지  /  549,832㎡

◦ 보상계획 열람공고  :     2개소 /    146필지  /   34,875㎡

◦ 감정평가 실시  :   36개소 /    459필지  /   99,979㎡

◦ 토지수용재결신청   :    2개소 /    48필지   /    5,038㎡

▸함열철도건널목입체화공사

▸KTX 서부역사 진입로

▸장신~송학간 도로 확․포장공사 공탁완료

□ 기 대 효 과

◦ 시민에게 다가서는 보상행정으로 양질의 서비스 제공

◦ 공익사업을 위한 적극 협의보상 도로망 확충으로 도시발전 기여

확인자	:	건 설 과 장		김 용 주	□
작성자	:	도로시설계장		권 수 헌	□

2. 2014년도 시군도 농촌도로 확포장 사업

□ 2014이월사업 및․ 계속사업  - - 20개사업

(단위:m, 백만원)

우선 순위	사 업 명	사업개요	예 산 액				추진실적	노선명	비고
			총 사업비	기투자	2014년 예산액	금후 투자
	20개사업	L=28.14km B=8m	38,053	6,991	908	30,154
1	함라 수동~금곡간 도로확.포장	L=1.23km B=7~8m	1,460	694	390	376	용지 99%	함라 207 (수곡선)
2	오산 북영선 도로확.포장	L=1.73km B=8m	2,251	1,126		1,125	공사중 (30%)	오산 204 (북영선)
3	여산 신리~호월간 도로확.포장	L=1.3km B=8m	1,108	262		846	용지 78%	여산 203 (신호선)
4	삼성동 하나로~ 외화간도로확.포장	L=1.55km B=8m	3,180	730		2,450	용지 63%	시도1201 (외화선)
5	오산 신수선 도로확.포장	L=1.5km B=7m	1,079	879		200	용지 93%	오산 203 (신수선)
6	오산 장신~만석간 도로확.포장	L=1.6km B=8m	1,786	274		1,512	용지 87%	오산 301 (용연선)
7	용동 삼정~두무간 도로확.포장	L=1.21km B=8m	1,847	76		1,771	용지 73%	용동 204 (삼두선)
8	함라 진등 진입로 개설	L=1.43km B=6.5m	1,063	145		918	용지 85%	함라 201 (진다선)
9	함라 칠성~다은간 도로확.포장	L=1.0km B=6.5m	975	190		785	용지 85%	함라 201 (진다선)
10	오산 모산선(신모선) 도로확.포장	L=1.87km B=6.5m	2,096	212		1,884	용지 85%	오산 306 (신모선)
11	망성 군도10호~ 금지간 도로확.포장	L=1.2km B=8m	1,872	180		1,692	용지 66%	군도 10호
12	왕궁 군도26호선 도로확.포장	L=1.7km B=8m	2,970	577		2,393	용지 75%	군도 26호

우선 순위	사 업 명	사업개요	예 산 액				추진실적	노선명	비고
			총 사업비	기투자	2014년 예산액	금후 투자
13	망성 신성~관산간 도로확.포장	L=0.91km B=7m	1,365	306		1,059	용지 68%	망성 303 (신선선)
14	금마 갈산~서편간 도로확.포장	L=1.6km B=8m	2,829	229		2,600	용지 45%	금마 101 (서삼선)
15	왕궁 가좌마을 진입로확.포장	L=0.7km B=8m	1,116	103		1,013	용지 63%	왕궁 303 (사곡선)
16	금마 누동~신촌간 도로확.포장	L=0.93km B=8m	1,411	405		1,006	용지 56%	금마 102 (누부선)
17	왕궁 평화촌~평리간 도로확.포장	L=1.3km B=8m	3,445	180		3,265	용지 52%	왕궁 302 (신평선)
18	왕궁 온수~시대간 (황암~상발)확.포장	L=3.0km B=8m	2,803	296		2,507	용지 57%	군도 21호
19	춘포 토다리~덕동간 도로확.포장	L=1.0km B=6.5m	2,220	127		2,093	용지 9%	춘포 103 (신화선)
20	성당 삼회선(성당우회도로) 도로 확포장공사	L=1.38km B=8.0m	1,177	0	518	659	용지 7%	성당 302 (삼회선)

□ 2014년 준공된 사업 -  없음

□ 2014년도 신규사업 - 1개사업

사 업 명	개 요	사 업 기 간	사 업 비 (백만원)					공 정	비 고
			총 사업비	기투자	이월액	2013 예산	금후
합 계	1개사업 L=1.3㎞ B=8.0m		1,177			518	659
성당 삼회선 도로확포장공사	L=1.3㎞ B=8.0m	2014 01 ~ 2017.12	1,177	0	0	518	659	20%

3.

확인자	:	건 설 과 장		김 용 주	□
작성자	:	도로시설계장		권 수 헌	□

철도건널목 입체화사업

□ 사 업 개 요

◦ 함열용성 철도건널목 입체화사업

▸ 개    요 : 도로(L=1.58㎞, B=8~13m)  교량(1개소/140m)

▸ 사 업 비 : 18,170백만원(시설공단 13,627, 익산시 4,543)

- 2014까지 확보액 : 18,170백만원(시설공단 13,627, 익산시 4,543)

- 예산 미 확보액    :  없음

▸ 공사기간 : 2010. 05 ~ 2014. 12.

▸ 시 행 청 : 익산시청         ▸ 현 공 정 : 100%

◦ 황등동연 철도건널목 입체화사업

▸ 개    요 : 도로(L=0.95㎞, B=15.4m)  지하차도(2개소/580m)

▸ 사 업 비 : 28,352백만원(철도시설공단 21,264, 익산시 7,088)

- 2014년까지 확보액 : 25,803백만원(시설공단 21,264, 익산시 4,539)

- 예산 미 확보액    :  2,549백만원(시설공단  , 익산시 2,549)

※ 2015년 본예산 확보 완료

▸ 공사기간 : 2010. 12 ~ 2015. 6

▸ 시 행 청 : 한국철도시설공단   ▸ 현 공 정 : 97%

□ 추 진 실 적

◦ 함열 용성 – 도로 준공 및 개통                    :  2014. 11 ~ 12월

◦ 황등 동연 - 동연 및 삼바레기 지하도(BOX) 구조물 설치  :  2014. 2 ~ 12

□ 금 후 계 획

◦ 2015년 황등동연 건널목입체화 사업 준공               : 2015. 6월

4. 산북천 하천환경정비사업

확인자	:	건 설 과 장		김 용 주	□
작성자	:	하 천 시 설 계 장		유 원 향	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 용안면 금강 합류점 ~ 낭산면 죽정천 합류점

◦ 사업기간 : 2010 ~ 2015

◦ 사 업 비 : 30,000백만원(국비 18,000, 도비 6,000, 시비 6,000)

▸ 2014년도(현재) : 21,795

◦ 사업내용 : 생태하천조성 L=6.64km

▸ 교량 1개소, 호안, 습지조성, 제방도로 등

◦ 현 공 정 : 82%

□ 추 진 실 적

◦ 교량 1개소(L=65m, B=7.0m)          완료

◦ 식생호안블럭  56,823㎡중    56,823㎡ 완료

◦ 자연석 쌓기   21,722㎡중    21,722㎡ 완료

◦ 식생옹벽블럭    720㎡중       720㎡ 완료

◦ 배수통관       15개소중      14개소 완료

◦ 제방도로 포장  12.6km중     12.1km 완료

□ 금 후 계 획

◦ 산북천 하천환경정비사업 1공구 준공(전체분)   :     2015. 06.

◦ 산북천 하천환경정비사업 2공구 준공(전체분)   :     2015. 12.

5. 소 하 천 정 비 사 업

확인자	:	건 설 과 장		김 용 주	□
작성자	:	하천시설계장		유 원 향	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 성당 성당리(택촌천), 여산 호산리(신평천)

◦ 사업기간 : 2012. 1. ~ 2015. 12

◦ 사 업 비 : 7,608백만원(국비 3,804 시비 3,804)

▸ 2014년 사업비 : 1,910백만원(국비 955, 시비 955)

◦ 사업내용 : 소하천정비 2개 하천 L=2.11km 및 토지보상

사 업 명	사 업 량	사업비(백만원)	사업기간
택 촌 천	소하천정비 L=1.04km	3,938	2012. 1 ~ 2014. 8
신 평 천	소하천정비 L=1.07km	3,670	2014. 2 ~ 2015. 12

□ 추 진 실 적

구분	사업명	사업량	사업비 (백만원)	추진실적	구분
2013년 까지	석왕천	소하천정비 L=3.27km	6,309	- 호안정비 L=3.27km
	신서원천	소하천정비 L=1.0km	2,490	- 호안정비 L=1.0km
	택촌천	소하천정비 L=0.6km	2,838	- 호안정비 L=0.6km - 교량4개소 시공
2014년	택촌천	소하천정비 L=0.44km	1,100	- 호안정비 L=0.44km - 교량2개소 시공	100%
	신평천	소하천정비 L=0.4km	810	- 호안정비 L=0.4km - 교량2개소 시공	45%

□ 금 후 계 획

◦ 신평천 소하천정비공사 준공(전체분)   :                    2015. 12.

6. 국가하천 유지관리사업

확인자	:	건 설 과 장		김 용 주	□
작성자	:	하천관리계장		최 선 우	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 국가하천 (금강, 만경강, 강경천) : 34.2㎞

▸ 금강 21,260m, 만경강 10,400m, 강경천 2,540m

◦ 사업기간 : 2014. 01 ~ 2014. 12.

◦ 사 업 비 : 398백만원(국비 100%)

◦ 사업내용

▸ 국가하천(금강,만경강,강경천) 유지관리

□ 추 진 실 적

◦ 금강 생태하천 산책로 정비공사 완료

▸ 콘프리트포장(황토색 도장포함) A=464㎡,배수관(D=300)L=76m

◦ 금강 생태하천 환경정비공사 완료

▸ 예초작업 A=43,016㎡

◦ 금강 생태하천 공공근로 인부 사역 시행 완료

▸ 인부사역 : 용안, 성당면 인근지역 주민

▸ 사역내용 : 생태하천 환경정비사업(풀깍기, 예초, 꽃길조성지 관리 등)

▸ 사역기간 : 2014년 6월 ~ 9월

▸ 인    원 : 20명

◦ 금강 생태하천 축구장 정비공사 완료

▸ 축구장 다짐(110×70m)

7. 도로조명시설 조도개선

확인자	:	건 설 과 장		김 용 주	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  : 익산시 일원

◦ 사 업 량  :  9개 사업

◦ 사 업 비  :  578.6백만원(시비)

◦ 사업기간  :  2014. 01. ~ 2014. 12.

◦ 도로조명 시설 조도개선 공사 내역

구 분	세부사업	사 업 개 요	예산 (천원)	비 고
합 계		9개 사업	578,650
가로등 신규설치	시민생활불편 해소사업	보안등 설치 11개소	10,500
	생활환경 개선사업	보안등 설치 216개소	365,450
	주민숙원사업	보안등 설치 113개소	78,200
노후가로등 정비	도심지역 도로조명 노후선로 정비	노후선로정비 30개소	30,000
	노후가로등점멸기교체	노후점멸기교체 5개소	22,500
	사업단지 및 자유지역 노후선로 정비	노후선로정비 20개소	20,000
	안전점검부적합 보안등시설보수	부적합시설보수65개소	26,000
	우기대비 가로등 부적합전기시설보수	부적합시설보수10개소	10,000
	북부권 고장 보안등 단가계약수리	고장단가계약	16,000

□ 추 진 실 적(574,689 . 99.3%)

◦ 보안등 설치(시비:374,211천원, 도비:76,406천원)	421개소 설치완료

◦ 노후가로등 점멸기 교체(19,532천원)	5개소 보수완료

◦ 가로등노후선로 정비(59,939천원)	58개소 보수완료

◦ 가로등안전점검 누전선로보수(9,890천원)	11개소 보수완료

◦ 노후 보안등기구 교체(18,948천원)	86개소 보수완료

◦ 북부권 고장보안등 보수단가(15,763천원)	73개소 보수완료

8. 도로조명 고장민원 처리 내역

확인자	:	건 설 과 장		김 용 주	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

□ 필   요   성

◦ 도로조명 고장민원 접수에서 처리까지의 기간을 단축하여 여성 및

노약자의 야간통행 편익제공으로 보행자 통행불편을 최소화 하고자 함.

□ 사 업 개 요

◦ 2014년도 생활민원 처리 현황               (2014년 12월말 현재)

구 분	설치수량	처리건수	평균처리일수	비고
합 계	27,199등	3,773
가로등	9,200등	1,085	2일
보안등	17,999등	2,688	7일

□ 쟁점 및 애로사항

◦ 고장민원이 읍․면․동에 산재해 있고 민원처리반이 가로등, 보안등

각 1개조로 이동에 따른 시간소요로 고장민원 처리가 지연되어 재차

민원 발생함.

□ 추 진 실 적

◦ 도로조명 생활민원처리 지역별 이원화 시행     :  2014. 01.

▸ 함열읍외 10개면 : 단가계약에 따른 민원처리

▸ 17개 면․동     : 가로등관리 자체인원으로 처리

◦ 도로조명 생활민원 처리(년중)                   :  2014. 01 ~ 12.

9. 익산 IC∼팔봉간 지방도 확포장사업

확인자	:	건 설 과 장		김 용 주	□
작성자	:	도로시설계장		권 수 헌	□

□ 사 업 개 요

◦ 세부내역

구 분	익 산 시	전 북 도	국토교통부
위 치	팔봉 인디안매장 ~ 금마면 경계	금마면 경게 ~ 국가식품클러스터	국가식품클러스터 ~ 익산 I.C
사업규모	L = 2.52km 4차선 ⇒ 6차선	L = 4.72km 4차선 ⇒ 6차선	L = 1.4km 4차선 ⇒ 6차선
사 업 비	110억원 ※ 기투자 67, 2015년 10, 금후 33	699억원 ※ 기투자 99, 2015년 72, 금후 금후 528	263억원 ※ 기투자 35, 2015년 148, 금후 80
사업기간	2010 ~ 2016	2012 ~ 2020	2013 ~ 2017
시 행 청	익산시 도시개발과	전북도청 도로공항과	익산지방국토관리청
추진사항	1.6km완료, 잔여876m	공사 착수	공사 착수

※ 익산국가식품클러스터 진입도로 건설 : 도로확․포장 4.1km ,  380억원

▸지방도(722호) : 1.4㎞, 4차로 ⇒ 6차로  263억원  ▸군  도(19호)  : 2.7㎞, 2차로 ⇒ 4차로  117억원

□  추진실적

◦ 익산 I.C~금마간 지방도 확․포장공사 토지매입 및 착공  : 2014. 1 ~

▸토지매입 - 전체 524필지 197,231㎡중 269필지 105,651㎡ 매입(54%)

◦ 익산국가식품클러스터 진입도로 확장공사 설계 완료   :  2014. 12.

□ 금후계획

◦ 익산 팔봉~ 금마면 경계 확․포장공사 추진 (시)  : 2015.  ~ 2016. 12.

◦ 금마면 경계 ~국가식품클러스터앞  확포장 공사(도) : 2014. 7. ~ 2020.  12.

◦ 식품클러스터앞 ~ 익산 I.C 확포장공사 추진(국)   : 2015.  ~ 2017. 12.

10. 국도 및 국도대체우회도로 개설

확인자	:	건 설 과 장		김 용 주	□
작성자	:	도로시설계장		권 수 헌	□

□ 사 업 개 요

◦ 장신~송학(서부진입로) 도로확장공사  L=1.16km, B=50m

▸ 사업기간 : 2010. 12 ~ 2016. 12

▸ 사 업 비 : 331억원(보상 270, 공사 61)    〈기투자 310 금후 21〉

▸ 추진사항 : 편입토지 보상 100%완료,  공사 공정율 12%

▸ 시 행 청 : 익산지방국토관리청 도로계획과

◦ 국도대체우회도로(황등~오산) 건설공사 L=10.8km, B=20m

▸ 사업기간 : 2003. 10 ~ 2016. 12

▸ 사 업 비 : 1,815억원(보상 153, 공사 1,662)〈기투자 1,707 금후 108〉

▸ 추진사항 : 편입토지 보상 100%완료,  공사 공정율 80%

▸ 시 행 청 : 익산지방국토관리청 도로계획과

◦ 강경~연무 국지도 확포장공사  L=8.4km,  B=20m

▸ 사업기간 : 2006. 10 ~ 2014. 12

▸ 사 업 비 : 1,286억원((보상 317, 공사 900)

▸ 추진사항 : 2014. 12월 준공 및 개통

▸ 시 행 청 : 충청남도 종합건설사업소

◦ 익산북부우회도로(서수~평장)  L=17.7km, 4차로 신설

▸ 사업기간 : 2014. ~ 2019.

▸ 사 업 비 : 2,497억원

▸ 추진사항 : 기본설계 용역 중

▸ 시 행 청 : 익산지방국토관리청 도로계획과

□ 추진실적

◦ 장신~송학  : 2015년 예산  89억원,  토지수용재결 및 공탁 완료

◦ 황등~오산  : 2015년 예산 284억원,  토공 및 구조물(교량) 설치

◦ 강경~연무  : 완료(2014. 12월 준공)

◦ 서수~평장  : 2015년 예산  42억원,  2014. 5 기본설계 용역 착수

□ 금후 계획

◦ 장신~송학  : 구조물 설치 및 도로포장

◦ 황등~오산  : 옹벽 등 구조물 설치 및 도로포장

◦ 서수~평장  : 주민공청회 및 기본설계(2014. 5 ~ 2016. 5)

11. 하천기본계획용역

확인자	:	건 설 과 장		김 용 주	□
작성자	:	하천시설계장		유 원 향	□

용 역 명	위 치	용역기간	용역비 (백만원)	용역개요	용역사	비고
3개소			1,862	L=113.5km
익산천 하천기본계획	금마면~ 춘포면	‘13.02.~‘14.11.	452	L=14.0km	㈜이산 외1
고창천 하천기본계획	웅포면	‘14.06.~‘15.02.	60	L=1.0km	㈜동 운
소하천정비 종합계획	익산시 전 역	‘14.04.~‘16.03.	1,350	58개소 L=98.5km	㈜한국종합기술 외2

□ 용 역 개 요

□ 상반기 추진실적

◦ 익산천 하천기본계획 용역 추진	2014. 01. ~

▸ 2013년도 발주분 계속사업으로 추진

◦ 고창천 하천기본계획 용역 착수	2014. 01. ~

◦ 소하천정비종합계획 장기계속계약 총액 발주	2014. 02. ~

▸ 소하천정비종합계획 1차분 착수 : 2014. 4월

□ 하반기 추진계획

◦ 익산천 하천기본계획 용역 준공	2014. 11.

◦ 소하천정비종합계획 1차분 준공	2014. 09.

▸소하천정비종합계획 용역비 2차분 2015년도 본예산 확보 추진

◦ 2015년 지방하천기본계획 용역비 확보 추진	2014. 07. ~ 12.

12. 가로등시설 실명제 추진(비예산)

확인자	:	건 설 과 장		김 용 주	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

□  필  요  성(추진배경)

◦ 가로등시설물의 체계적인 관리 필요 및 고장신고 민원인 편익제공

▸ 고장신고시 해당위치 설명이 정확히 전달되지 않고 가로등이 곳곳에

산재해 있어 효율적인 시설관리와 상세현황 파악관리에 어려움

□ 사 업 개 요

◦ 사업대상 : 가로등 분전함(351개소), 가로등(9,044개소)

◦ 사업내용 : 가로등주에 고유관리번호 부여

◦ 사업계획

▸ 가로등시설물 전수조사실시 및 자료 확보

- 자체인력(가로등담당 외 6명)활용으로 사업비 최소화

◦ 사업기간 : 2014. 1. ~ 2014. 12.

□ 추 진 실 적

◦ 가로등시설물 전수조사(자료 수집 및 확보)   :  2014년 1월~12월

▸ 가로등시설물 전수조사실시 및 자료 확보

▸ 각 분전함 및 가로등주에 고유관리번호 부여

◦ 가로등시설물 관리번호표찰부착 : 예산확보 후 2015년부터 단계별 사업추진

13. 2014 읍면동별 가로등 보안등 신규설치현황

확인자	:	건 설 과 장		김 용 주	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

□ 보안등 설치현황

연번	읍면동	설치수량	연번	읍면동	설치수량	비 고
1	함열읍	9	15	삼기면	25
2	오산면	40	16	중앙동	2
3	황등면	11	17	평화동	18
4	함라면	6	18	인화동	4
5	웅포면	8	19	동산동	14
6	성당면	22	20	마 동	1
7	용안면	4	21	남중동	17
8	용동면	1	22	모현동	14
9	낭산면	28	23	송학동	5
10	망성면	27	24	신 동	13
11	여산면	50	25	영등동	6
12	금마면	33	26	어양동	3
13	왕궁면	19	28	팔봉동	9
14	춘포면	25	29	삼성동	7
	소 계	283		소 계	138
	총 계				421

□ 가로등 설치현황

연번	사 업 내 용	등수	사업기관(부서)
1	신용/모현육교가로등공사	21	한국철도공단
2	송학 포스코 아파트 신설 가로등	26	포스코건설
3	보람주유소건너(생태습지공원입구)	4	도시개발과
4	용성철도건널목 입체화공사 구간가로등	36	건설과(도로시설)
계		87