시청사 보수․보강공사 선결처분 승인의 건

의안 번호	287		제출일자 : 2015. 10. 5
			제 출 자 : 익 산 시 장

□ 제안이유

○ 현재 우리시 청사는 1970년도에 건립되어 44년이 경과되고 있는 청사로 실제 전국에서도 손꼽히는 낡고 노후화된 청사로써 2005년 및 2008년에는 정밀안전진단결과 안전등급 D등급 평가를 받아 2009년에 시급하게 보수·보강공사를 실시하는 등 청사에 대한 안전관련 문제가 끊임없이 지적되고 있는 상황이며,

○ 2014년 10월부터 2015년 3월까지 청사정밀안전진단을 실시한 용역결과「일부 부재의 보유내력이 부족하고 건물의 사용연한이 장기화됨에 따라 구조체의 내구성능 저하가 우려되고 있어 해당 부재에 대하여 보강조치를 통한 구조적 안전성 확보가 필요하다」는 의견이 제시되어 익산시 청사 보수·보강공사를 2015년 4월부터 6월까지 1단계 공사를 추진해 왔으며 현재 1단계 공사 이후 예산 부족으로 2단계 공사를 진행하지 못하고 있는 상태임.

○ 이번 선결처분을 거쳐 시청사의 구조적 안전성 조기 확보로 시청사를 내방하는 시민과 1,500명 직원들에게 안전한 청사환경을 제공하고자 함.

□ 선결처분 사유

○ 시청사를 내방하는 시민 및 1,500명 직원들의 생명과 안전에 직결되는 청사안전을 위해 보수․보강 공사비를 긴급 집행하고자 함.

□ 승인을 구하는 사항

○ 시청사 보수․보강공사에 필요한 200백만원을 예비비를 활용하는 선결처분

□ 주요내용

○ 시청사 보수․보강공사에 따른 총 소요예산 : 200백만원

▸ 2단계 시청사 보수·보강공사비 : 170백만원

- 주민생활지원국장실, 문화산업국장실, 홍보담당관, 행정자료실, 건물 외벽 등에 대한 보수·보강

▸ 읍·면·동 청사 보수 공사비 : 30백만원

- 춘포면, 송학동, 황등면의 건물 외벽 방수공사

시 청사 보수·보강사업 추진현황

Ⅰ		안전진단 개요

❍ 용 역 명 : 익산시 청사 정밀안전진단 및 보수․보강 실시설계용역

※ 청사 현황

- 건축규모(본관, 후관1동) : 5,271.86㎡, 지하1층/지상4층, 1970년12월20일 준공

❍ 용역기간 : 2014. 10. 20. ~ 2015. 03. 24.

❍ 용 역 비 : 61,576천원

❍ 용역업체 : 건축법인 녹 엔지니어링 건축사사무소(주)

❍ 진단결과 : 상태평가 등급 “C” 등급

▸구조해석결과 구조체 내구성능 저하 방지를 위한 보수․보강조치를 통해 구조적 안전성 확보 의견제시

Ⅱ		보수·보강공사 개요

❍ 공 사 비 : 369,764천원(건축, 전기, 통신, 폐기물, 감리)

❍ 공사기간 : 2015. 04. 14. ~ 2015. 11. 19(단계별 공사추진)

▸1단계 공사기간 : 2015. 04. 14. ~ 2015. 06. 30.

❍ 공사대상부서 : 기획예산과외 10개소

(물탱크실, 회계과, 회계과옆 연결통로, 주민생활지원국장실, 기획 예산과, 행정자료실, 문화산업국장실, 홍보담당관, 민생경제과, 식품클러스터지원과, 기업유치 T/F팀, 건물 외벽)

❍ 현 공정률 : 50%진행(1단계 공사 완료)

❍ 2단계 공사비 1억 7,000만원 : 제1회 추경 예산 미반영