익산시 수도정비기본계획(변경) 용역 선결처분 승인의 건

의 안	288				제 출 일 : 2015. 10. 05.
번 호					제 출 자 : 익 산 시 장
					제안설명자 : 상하수도사업단장

제안이유

❍ 2015년도 예산불성립에 따른 개방형 상수원 수로의 수질오염 상존으로 지방상수도를 광역상수도로 용수공급 급수체계를 변경하여 시민에게 안전하고 깨끗한 생활용수공급을 위한 합리적․체계적 수도정비기본계획(변경) 수립 필요로 지방자치법 규정에 의거 「선결처분」에 대하여 지방의회에 보고하여 승인을 구하고자 함

동의를 구하는 사항

❍ 익산시 수도정비 기본계획(변경) 용역 선결처분 의회 승인

※ 지방자치법 제109조(지방자치단체의 장의 선결처분)

용역 개요

❍ 용 역 명  : 수도정비 기본계획 변경 수립 용역

❍ 용역개요  : 수도정비 기본계획 변경 1식

❍ 용역기간  : 착수일로부터 18개월

❍ 용 역 비  : 400,000천원(부가세 포함)

주요변경 내용

❍ 용수공급 급수체계 변경

‣지방(신흥, 금강정수장) → 광역(전주권 광역상수도) 전환

❍ 시설확충 및 정수장 폐쇄 계획 수립

‣광역급수구역 전환에 따른 시설계획 수립

‣신흥, 금강정수장 정수 공급시설 폐쇄 계획 수립

‣신흥정수장 공업용수 전용시설 활용(35,000㎥/일)

❍ 상수원보호구역 해제

‣신흥, 금강정수장 폐쇄에 따른 상수원보호구역 해제

❍ 상수도 수요관리계획, 상수도시설 안정화 계획 추가(수도정비 기본계획 수립 지침 개정, 2011.9, 환경부)

향후추진계획

❍ 사업 세부 평가기준(안) 작성 -------------------------  2015. 10 ~ 11

❍ 계      약       심      사 -------------------------  2015. 12

❍ 용 역   집 행  계 획  보 고 -------------------------  2015. 12

❍ 평가기준(안) 적용의 적정성 심의 --------------------- 2016. 01

❍ 사업수행능력평가 제출 안내 공고 ---------------------- 2016. 02 ～ 2016. 03

❍ 사업 수행능력평가서 평가 ------------------------------- 2016. 03 ～ 2016. 04

❍ 선정업체 지명경쟁 입찰 ---------------------------------- 2016. 05

❍ 용   역    시    행 -------------------------------------- 2016. 06 ～

지방상수도의 광역상수도 전환 대비

수도정비기본계획(변경) 절차 검토

개방형 상수원 수로의 수질오염 상존으로 지방상수도를 광역상수도로 용수공급체계 변경(Q=90,000㎥/일)에 대비하여 수도정비기본계획(변경) 절차 등의 사전 검토 결과임

□ 용 역 명 : 수도정비기본계획(변경)수립 용역

□ 계획구역 : 익산시 전역 A = 506.94km2

□ 용역 소요기간 :  1년 6개월 예상(검토 및 협의 지연시 소요기간 연장)

□ 소요예산 : 400백만원

□ 주요변경내용

구 분	주요변경내용	비 고
Ⅰ. 수도정비계획
1. 총설 및 기초조사	◦상수도 시설 운영현황 조사
2. 기본사항의 결정	◦목표연도, 급수구역, 용수수급전망
3. 시설확장계획	◦신흥・금강급수구역 광역상수도 전환계획 ◦금강정수장(정수)(Q=30천㎥/일) ⇒ 공업계통 전환(Q=45천㎥/일)
4. 시설개량계획	◦신흥정수장 일부 시설폐지계획 수립
5. 상수도 수질관리계획	◦상수원 보호구역 해제계획
Ⅱ. 상수도 수요관리계획	◦수도정비기본계획 수립지침개정(2011.9) 사항	금회반영
Ⅲ. 상수도시설 안정화 계획
Ⅳ. 재정 및 경영계획

□ 수도정비기본계획(변경) 절차

		추 진 절 차				소 요 기 간
						수행기간	계
		예산확보 및 설계용역 발주				2개월	2개월
		공고 및 참여업체 등록 등			→
		낙찰자 결정
		용역착수 및 초안제작			→	3개월	5개월
		도 경유, 환경부 초안 심사 세부검토 : 환경관리공단			→	2개월	7개월
		주민설명회			→	1개월	8개월
		환경부 검토회신, 본안제작			→	6개월	1년 2개월
국토교통부 협의 세부검토:수자원공사	↔	도 경유, 환경부 본안 심사 세부검토 : 환경관리공단				4개월	1년 6개월
		환경부 승인통보			→
		고시 ( 익산시 )

□ 앞으로 추진일정

○ 용역 사업비 확보(400백만원)                : 2015. 10월

○ 용역 추진계획 보고                          : 2015. 12월

○ 용역시행 및 발주 의뢰                       : 2016.  6월

○ 낙찰자 결정 및 용역착수                     : 2016.  7 ~ 8월

○ 환경부 승인                                 : 2018. 1월