2015. 10

― 2015 주요업무보고 ―

2015 결산 및 2016 시책보고

	문화산업국

투자유치과

□	일 반 현 황	…	5
□	2015 주 요 업 무	…	7
□	2016 신 규 시 책	…	19

일  반  현  황

□ 기       구

													투자유치과
투 자 정 책										투 자 유 치							산업단지관리						기 업 지 원

□ 정 ․ 현 원

(정원/현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	19	1	1	5	7	5	0
현 원	18	1	1	6	6	3	1
증 감	△1			1	△1	△2	1

□ 사 무 분 장

□ 투자정책 :  시정발전 산업육성 전략개발, 신성장 동력산업 발굴,   산학연 연구개발 지원사업, 과학기술 육성 및 정책개발

□ 투자유치 :  기업유치 종합계획수립, 외국인 투자정보 분석관리,   공장입지 가능지역 조사관리, 신규 이전업체 지원

□ 산업단지관리  :  산업단지(일반․농공) 관리, 산단 및 개별지역 휴폐업업체 관리, 공장설립(창업․개별지역), 기업정보 및 동향파악

□ 기업지원 :  중소기업육성, 중소기업제품 구매촉진, 섬유․석재산업 육성,   여성기업 활성화 지원

2 0 15  주 요 업 무

	□ □	익산 종합비즈니스센터 건립 중소기업 육성․지원 사업 우수 우량기업 유치 지역경제 활성화 익산노후산단 경쟁력 강화사업 향토기업 및 환경친화기업 육성 3D프린팅 호남권 지역거점센터 구축

【계속사업】

1		익산 종합비즈니스센터 건립

⋄ ⋄	노후산업단지 등 경쟁력 강화 및 쾌적한 산업환경 조성 지식기반 산업기술개발 네트워크 조성, 근로자 권익신장 및 복지 증진

□ 사 업 개 요

□ 위     치 : 익산시 약촌로 10길 30 일원 (국가산단 내 귀금속 2단지)

□ 사업기간 : 2013 ~ 2016년(4년)

□ 사 업 비 : 175억원(국비 40, 도비 12, 시비 28, 산단공 95)

※ 현재 확보액 : 148억원(국비 18, 도비 12, 시비 28, 산단공 90)

□ 사업규모 : 부지면적 6,000㎡, 건축면적 8,618㎡(지하1층, 지상6층)

구 분	층수	용 도	면 적	비고
합 계		7개층	8,618㎡
지 상	6	근생, 기업지원기관	759㎡
	5	한국산업단지공단, 신용보증기금	1,021㎡
	4	3D프린팅호남거점센터	1,021㎡
	3	기업지원기관	1,021㎡
	2	조명연구원 전북분원	1,456㎡
	1	근생, 회의실, 방송실	1,285㎡
지 하	1	근생, 기계실(조명연구원, 3D프린팅)	2,055㎡

□ 추 진 실 적

□ MOU협약체결(전라북도,익산시,산단공)	: 2014. 12. 15.

□ 익산종합비즈니스센터 실시설계용역 계약	: 2015.  5. 22.

□ 비즈니스센터 내 입주공간 협의	: 2015.  7. 29.

▸전라북도, 익산시, 한국산업단지공단익산지사, 한국조명연구원

□ 한국조명연구원 전북분원 입주에 따른 설계하중 및 전력증설협의	: 2015. 8.  6.

▸총사업비 범위내 안전설계반영 (규모축소 : 8개층→7개층)

□ 비즈니스센터 내 입주기관 설계반영협의	: 2015. 9.  1.

▸3D프린팅 호남거점센터 입주에 따른 장비하중 설계반영 등

□ 비즈니스센터 건립관련 실무자 협의(익산시 , 산단공)	: 2015. 9. 17.

▸진입도로 확보 및 국가예산 확보 대책 등

□ 마무리 대책

□ 비즈니스센터 입주기관별 실시설계반영 확인	공사발주전

□ 3D프린팅 호남거점센터 구축 추가소요예산(10억)확보	2015. 12.

□ 비즈니스센터 건립공사 발주	2015. 12월중

【계속사업】

2		중소기업 육성․지원 사업

◇ ◇	관내 중소기업의 자금, 기술개발 및 마케팅 활동 지원 중소기업의 경영안정과 대외경쟁력 강화 도모

□ 사 업 개 요

□ 사업기간 : 2015. 01. ~ 12월

□ 사업대상 : 관내 중소기업

□ 사업내용

▸중소기업육성자금 융자지원	: 15,000백만원 이내

▸여성기업체 마케팅 지원	: 20백만원

▸국내ㆍ외 시장개척 지원	: 14백만원

□ 추 진 실 적

□ 중소기업 육성자금 지원

▸신규 업체 융자 알선	: 56개업체(9,730백만원)

▸이차보전금 지원	: 171개업체(351백만원)

□ 여성기업체 마케팅 지원	: 10개업체(20백만원)

▸홍보 카다로그 제작 및 홈페이지 구축 등

□ 국내ㆍ외 시장개척 지원	: 8개업체(12백만원)

▸국제 박람회 참가 부스비 지원

□ 마무리 대책

□ 연말 중소기업 육성자금 확대 지원 추가신청 접수	2015. 11월중

▸조성자금(10,400백만원)의 100% ⇒ 150%로 확대 시행

□ 국내ㆍ외 시장개척 지원	2015. 12월중

▸하얼빈 국제 무역상담회 및 광저우 추계 수출입상품 교역회 참가           업체 지원 (2개 업체)

□ 익산시 중소기업 지원센터 구축	2015. 11월말

▸익산시 홈페이지 개편 병행 배너설치

⇒ 산업단지 분양안내, 기업유치 참여 코너, 기업 지원사항 홍보,             기업애로 건의 및 처리 코너

【계속사업】

3		우수 우량기업 유치 지역경제 활성화

□ 사 업 개 요

□ 추진기간 : 연중

□ 대상지역 : 익산 제3 · 4일반산업단지

□ 유치업종 : 환경친화기업 및 첨단기술기업 우선 유치

□ 유치목표 : 13개 업체 / 1,090명 고용창출 / 1,990억원 투자유치

□ 산업단지 분양현황                                     (단위 : 천㎡ / %)

구 분	분양계획 ⓐ	투자협약ⓑ		분양계약ⓒ		미 분 양
		면적	비율	면적	비율	ⓐ-ⓑ		ⓐ-ⓒ
합 계	1,878	1,459	77.6	774	41.2	419	22.4	1,104	58.8
제3산단	1,575	1,197	76.0	663	42.0	378	24.0	912	58.0
제4산단	303	262	86.4	111	36.6	41	13.6	192	63.4

□ 추 진 실 적

□ 투자협약 체결  : 8개 업체 (92,256㎡ / 490억원 / 330명)

▸3산단 (5개 업체), 4산단(3개 업체)

□ 분양계약 체결  : 7개 업체 (82,356㎡ / 440억원 / 300명)

▸3산단 (5개 업체), 4산단(2개 업체)

□ 투자의향기업 발굴 : 8개 업체

▸첨단소재(4), 식품(1), 건축자재(1), 화학(2)

□ 각종 보조사업자 선정시 기업유치 기여자 우선 선정 기준 시달  :‘15. 9. 15.

□ 마무리 대책

□ 기업유치 활성화를 위한 관련 규칙 개정	2015. 11.

▸투자보조금 지급 시 고용비율 적용 폐지

□ 투자협약 체결업체 연내 분양계약 체결	2015. 12.

▸비투지코리아, 하림식품 등 6개사

【신규사업】

4		익산 노후산단 경쟁력 강화

⋄ ⋄	혁신기반 융복합집적지 구축 산단 경쟁력 향상 재생사업을 통하여 쾌적하고 안전한 산단조성

□ 사 업 개 요

□ 위    치 : 익산국가산업단지 및 제2일반산업단지 일원

□ 사업기간 : 2015 ~ 2030년(15년간)

□ 시 행 자 : 익산시, 전라북도, 한국산업단지공단, 민자

□ 사 업 비 : 2,576억원(국비 472 지방비 329 민자 1,775)

□ 사업내용 : 융복합집적지조성 및 기반시설정비

□ 사업내역

단계별	사 업 명		사업비(억원)				사업기간	추진방법
			합계	국비	지방비	민간
합 계	30건		2,576.0	471.5	329.5	1,775.0
1단계	소계(16건)		1,477.0	340.5	282.5	854.0
	종합비즈니스센터		175.0	40.0	40.0	95.0	2013~2016	도+시+산단공
	호남3D프린팅지역거점센터구축		80.0	45.0	12.0	23.0	2016~2017	도+시+산단공
	전북융복합디자인센터구축		150.0	75.0	75.0		2016~2019	도+시+산단공
	국제컨벤션센터		526.0			526.0	2016~2020	민간
	업종고도화센터건립외3건		185.0			185.0	2019~2023	민간
	문화복지센터		150.0	75.0	50.0	25.0	2018~2021	도+시+산단공
	작은도서관조성		1.0	0.5	0.5		2016~2018	도+시
	기반시설정비		210.0	105.0	105.0
		(하수도정비)	(50.0)	(25.0)	(25.0)		2016~2018	시
		(도로정비)	(80.0)	(40.0)	(40.0)		2016~2018	시
		(공원조성)	(40.0)	(20.0)	(20.0)		2016~2018	시
		(가로등정비)	(5.0)	(2.5)	(2.5)		2016~2018	시
		(주 차 장)	(25.0)	(12.5)	(12.5)		2016~2018	시
		(교통체계개선)	(10.0)	(5.0)	(5.0)		2016~2018	시

단계별	사 업 명	사업비(억원)				사업기간	추진방법
		합계	국비	지방비	민간
합 계	30건	2,576.0	471.5	329.5	1,775.0
2단계	소계(5건)	589.0	120.0	30.0	439.0
	융복합벨트거점지구조성외4건	589.0	120.0	30.0	439.0	2019년이후	도+시+산단공
3단계	소계(9건)	510.0	11.0	17.0	482.0
	스마트공장지원외8건	510.0	11.0	17.0	482.0	2020~2030	민간

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2015년	2016년	2017년	2018년 이후
계	257,600	14,800	3,900	10,500	228,400
국 비	47,150	1,800	2,800	5,250	37,300
도 비	16,475	1,200		2,625	12,650
시 비	16,475	2,800	600	2,625	10,450
기 타	177,500	9,000	500		168,000

□ 추 진 실 적

□ 2015년 노후산단 경쟁력강화사업 대상단지 선정         : 2015.7.14.

□ 재생분야 경쟁력강화사업 추진협의(국토교통부)          : 2015.8.11.

▸기반시설 정비대상 및 사업비 조달 등

□ 혁신분야 경쟁력강화사업 추진협의(산업통상자원부)      : 2015.8.24.

▸비즈니스센터 건립현황 및 향후 추진계획 등

□ 국회국토교통위원회 사업설명 및 국가예산 확보 요청    : 2015.8.31.

▸비즈니스센터 건립 2016년 국가예산 증액요구(6억→22억)

□ 안전보호 융복합 제품산업 클러스터 조성사업 유치의견 제출(전북도): 2015.9.23.

□ 마무리 대책

□ 기반시설정비 대상파악 및 정비방안 강구	2015. 10월중

▸중앙체육공원 연계 야생화 거리조성등 공원화

▸도로변 조형물 설치 문화거리 조성 등

▸주차공간 확보 및 인근도로 연계성 확보 등

□ 익산종합비즈니스센터 건립공사 발주	2015. 12월

【공약사업】

5		향토기업 및 환경친화기업 육성지원

◇ ◇	지역사회 발전에 기여한 우수향토기업 발굴 지원 기업 경영의욕 고취 및 경영 활성화 도모

□ 사 업 개 요

□ 사업기간 : 2015. 1. ~ 12월

□ 사업대상 : 관내 중소기업

□ 사 업 비 : 521백만원(도비 44, 시비 477)

□ 사업내용

▸익산시 우수 향토기업 선정 및 지원 :	5개업체(100백만원)

▸중소기업 환경개선사업 지원	: 15개업체(146백만원)

▸석재업체 노후기계개선 지원        : 15개업체(150백만원)

▸섬유업체 환경 및 시설개선 지원	: 14개업체(125백만원)

□ 추 진 실 적

□ 익산시 우수 향토기업 선정 공고	: 2015. 9. 4. ~ 10. 2.

□ 중소기업 환경개선사업 지원	:  14개업체(134백만원)

▸근로자 편익시설 개선지원	: 5개업체(26백만원)

▸근로 환경개선 지원                : 9개업체(108백만원)

□ 석재 및 섬유업체 시설개선사업 지원	: 25개업체(235백만원)

▸석재업체 노후기계 개선 지원사업	: 13개업체(130백만원)

▸섬유업체 환경 및 시설개선 지원사업 : 12개업체(105백만원)

□ 마무리 대책

□ 익산시 우수향토기업 신청 접수 및 선정 사업시행	2015. 10월한

▸기업유치 기여업체 우선선정(10~20점 가점)

□ 우수 향토기업 등 지원에 관한 조례 제정	2015.11월한

□ 중소기업 환경개선 지원사업 준공(1개업체/12백만원)	2015. 11월

□ 석재 및 섬유업체 시설개선 지원사업 준공(4개업체/40백만원)	2015. 11월

▸석재업체 노후기계개선 지원사업 (2개업체/20백만원)

▸섬유업체 환경 및 시설개선 지원사업 (2개업체/20백만원)

【신규사업】

6		3D프린팅 호남권 지역거점센터 구축

◇ ◇	호남권 특화분야(경량소재부품 등) 3D프린팅 기술지원 기반 구축 호남권 주력산업 및 신성장 동력산업 3D프린팅 기술확산

□ 사 업 개 요

□ 위    치 : 익산 국가산업단지 내 익산종합비즈니스센터

□ 사업기간 : 2015 ~ 2020 (6년)

□ 시설규모 : 1,280㎡(장비, 교육 및 기업지원실 등)

□ 사 업 비 : 60억원(국 45,  도 6,  시 6,  민간 3)

※ 익산 종합비즈니스센터 입주공간 제공(익산시)

□ 시행주체 : 전라북도, 익산시, (재)전북테크노파크

□ 주요기능 : 산업용 3D프린팅 인프라 구축, 제조분야 3D프린팅 생산공정 및 기술지원 등

□ 추 진 실 적

□ 3D프린팅 호남권 지역거점센터 구축방안 협의	: 2015. 5. ~ ６.

▸전라북도, 전북테크노파크, 한국생산기술연구원, 익산시

□ 익산 종합비즈니스 센터 내 거점센터 입주협의	: 2015. ６. ~ ８.

▸한국산단공 및 전북테크노파크(비즈니스 센터 4층 1,280㎡)

□ 3D프린팅 호남권 지역거점센터 입주 추가요구 협의   : 2015. 9. 1.

(장비하중 및 소요 전력량 증설 등)

▸건축물 구조보강 및 전력량 증설에 따른 추가 사업비 소요(10억원)

□ 마무리 대책

□ 3D프린팅 호남거점센터 활성화를 위한 정책토론회	2015.10.12.

▸원광대학교 숭산기념관(전라북도 주관/ 산업자원부 후원)

□ 종합비즈니스 센터 공사발주 전 설계반영 확인	2015. 12월중

□ 거점센터 입주에 따른 추가 소요 사업비 확보(10억)	2015. 12.

2 0 16  신규시책

		익산시 홈페이지 기업지원센터 운영

익산시 홈페이지 기업지원센터 운영

□ 필  요  성(추진배경)

□ 디지털 정보화 시대에 맞는 기업체와 거버넌스 강화

□ 시정시책 및 기업동향 공유 기업유치 활성화

□ 운 영 개 요

□ 운영기간  :  2016. 1월부터

□ 운영매체  :  익산시 홈페이지 베너설치

□ 운영내용

▸산업단지 분양안내 및 인센티브 홍보

▸시정시책(중소기업 지원시책 등) 홍보

▸기업애로건의 코너개설

▸기업체 현황 및 기업지원 수요조사 등

□ 추 진 계 획

□ 익산시 홈페이지 개편 협의(교육정보과)	2015. 10월

□ 익산시 관내 기업체 현황 등 기초자료 확보	2015. 10 ~ 11월

□ 익산시 기업지원센터 기초자료 업로드	2015. 11월

□ 익산시 기업지원센터 운영 홍보	2015. 11 ~ 12월

▸업종별 협의회 및 기업체 관리자 메시지 발송 등

□ 기 대 효 과

□ 디지털 정보매체 활용기업인 등 시정참여 확대

□ 기업체와 의사소통 강화 기업하기 좋은 도시 조성