2015.  11.

제189회 익산시의회(임시회)

2015 주요업무 결산보고

	농업기술센터

농업정책과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2015 예 산 집 행 실 적
□	2015 주 요 성 과
□	2015 주 요 업 무 결산

비전 및 중점추진방향

	비 전
여유와 활력이 넘치는 풍요로운 농촌건설

		전 략 목 표
◦ ◦◦	살기좋은 복지농촌 건설 농업 경쟁력 강화 쾌적한 농촌환경 조성

		중 점 과 제
◦◦◦ ◦	농업인 복지지원 강화 친환경 농업육성 및 쌀 경쟁력 제고 농업 기반시설 정비 및 농촌 종합개발 경제활동 다양화 및 지역발전 역량강화

일  반  현  황

□ 기       구

											농 업 정 책 과
농업정책					농정개발					친환경농업					기반조성				농지관리							마을만들기

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별							비고
		지도관	5급	6급	7급	8급	9급	지도사
정 원	25	1	1	7	8	4	1	3
현 원	27	1	1	9	10	3	1	2
증 감	2			2	2	△1		△1	휴직1

□ 사 무 분 장

□ 농업정책	:	농업정책 종합기획, 농업인자녀 학자금지원, 농업인 복지지원사업, 농림사업 총괄, 농촌다문화가족지원, 센터소관 계약 및 지출
□ 농정개발	:	농업경영컨설팅 지원사업, 향토산업육성, 농업법인 및 공동이용 조직육성, 농업농촌시책개발, 농민단체(농민회 및 농업경영인 등)관리 및 육성
□ 친환경농업	:	친환경농업육성 및 인증확대 추진, 쌀경쟁력 제고사업, 농업재해 비료생산업등록 및 관리, 농약판매업등록
□ 기반조성	:	농업기반시설 조성사업, 국유재산 사용수익허가, 배수펌프장안전점검 및 유지관리, 농업용수시설 유지관리
□ 농지관리	:	국토이용계획 변경협의, 농지전용허가(협의), 농지원부관리, 농지취득자격증명발급, 농지의 타용도 일시사용 허가 및 협의
□ 마을만들기	:	농촌마을 종합개발사업, 농촌테마공원조성, 마을만들기 전반에 관한 사항 전원마을 종합개발사업, 녹색농촌체험마을조성, 지역리더 양성

2015 예산집행실적

【 2015. 10. 15 현재 】                           (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
농업정책과				40,527,060	26,137,963	14,389,097	64.5
	농업 경쟁력 강화			17,921,974	7,808,955	10,113,019	43.6
		농업인복지지원		3,252,642	1,906,591	1,346,051	58.6
			농업인자녀학자금지원사업	494,500	289,633	204,867	58.6
			농어촌보육교사특별근무수당지원	435,600	302,720	132,880	69.5
			농가도우미 지원사업	34,560	14,040	20,520	40.6
			영농도우미 농업인부담금지원	4,230	3,087	1,143	73.0
			농작물 재해보험 지원사업	423,322	111,619	311,703	26.4
			농업인 안전공제 지원	119,010	45,946	73,064	38.6
			농어민소득원개발육성기금지원	1,920	1,640	280	85.4
			경관보전직접지불제	1,739,500	1,137,906	601,594	65.4
		농업정보제공 및 농민단체활성화		265,120	167,715	97,405	63.3
			농업경영컨설팅 지원	62,500	31,250	31,250	50.0
			한국농어민신문 보급지원	78,120	58,590	19,530	75.0
			한국 농정신문보급지원	40,500	30,375	10,125	75.0
			농촌봉사활동지원	5,000	5,000	0	100.0
			민족농업전진대회	6,000	6,000	0	100.0
			농민회영농발대식	7,000	7,000	0	100.0
			농업인 교육사업	20,000	0	20,000	0.0
			농정연구회 교육	5,000	0	5,000	0.0
			친환경농업선진지견학	3,000	3,000	0	100.0
			농업경영인육성	38,000	26,500	11,500	69.7
		민관협력 농정시스템 확립		1,735,006	1,118,368	616,638	64.5
			농업농촌발전추진위원회운영	1,470	62	1,408	4.2
			농업농촌발전추진위원회운영	33,450	0	33,450	0.0	사고이월
			농촌어린이 지원	5,000	5,000	0	100.0
			농촌 다문화가정 지원사업	5,000	4,460	540	89.2
			농업농촌 현장형 학습동아리지원	8,000	7,200	800	90.0
			금강EH(Eco&History)tour	227,344	11,869	215,475	5.2
			금강EH(Eco&History)tour	1,454,742	1,089,777	364,965	74.9	사고이월
		농림사업추진		174,490	131,178	43,312	75.2
			농림사업추진	51,740	43,777	7,963	84.6
			농업기술센터 청사관리	122,750	87,401	35,349	71.2
		쌀경쟁력제고사업		2,171,538	634,118	1,537,420	29.2
			쌀경쟁력제고사업	1,221,158	147,054	1,104,284	9.6
			비가림벼육묘장설치지원사업	108,000	72,000	43,200	60.0
			들녘별쌀경영체육성사업	504,000	136,748	367,252	27.1
			들녘별쌀경영체육성사업	332,200	325,251	22,684	93.2	사고이월
			재해 및 복구지원	6,180	6,180	0	100.0
		친환경농업육성		9,352,547	3,396,268	5,956,279	36.3
			친환경유기질비료지원	150,000	0	150,000	0.0
			친환경농업직접지불제지원사업	166,395	0	166,395	0.0
			토양개량제 지원	2,144,449	1,160,981	983,468	54.1
			벼육묘용상토지원	500,000	500,000	0	100.0
			친환경농산물및GAP인증비용지원	68,600	68,554	46	99.9
			유기질 비료지원사업	2,154,039	1,051,222	1,102,817	48.8
			친환경유기농업육성지원	140,000	0	140,000	0.0
			우리밀소비촉진지원사업	43,560	43,560	0	100.0
			밭농업직불제 지원사업	1,532,696	5,657	1,527,039	0.4
			GAP인증농가 안정성검사비 지원사업	33,461	0	33,461	0.0
			친환경농자재지원사업	223,333	37,438	185,895	16.8
			맞춤형비료지원사업	400,000	400,000	0	100.0
			고품질스테비아쌀 부가가치향상지원사업	150,000	81,780	68,220	54.5
			친환경퇴비생산시설현대화사업	55,992	47,076	8,916	84.1	사고이월
			피해보전직불제 지원사업	22,022	0	22,022	0.0
			친환경농업기반구축사업	1,568,000	0	1,568,000	0.0
		도농교류 활성화 지원		453,160	61,160	392,000	13.5
			농촌체험휴양마을육성사업	32,160	24,960	7,200	77.6
			농촌활성화현장포럼운영	29,000	29,000	0	100.0
			전북형 농촌관광거점마을 지원	362,000	7,200	354,800	2.0
			농촌축제지원	30,000	0	30,000	0.0
		농촌체험마을조성		417,747	366,417	51,330	87.7
			농촌체험마을 사후관리지원사업	135,000	90,000	45,000	66.7
			농촌체험마을조성 사후관리지원사업	30,000	30,000	0	100.0	사고이월
			농촌체험마을 신규 조성사업	252,747	246,417	6,330	97.5	명시이월
		농식품6차산업화		41,000	25,000	16,000	61.0
			도농연계6차산업화사업	16,000	0	16,000	0.0
			6차산업 경영컨설팅지원사업	25,000	25,000	0	100.0	사고이월
		농지관리		58,724	2,140	56,584	3.6
			농지이용관리 지원	58,724	2,140	56,584	3.6
	농촌환경 및기반시설정비			21,942,499	17,701,937	4,240,562	80.7
		농촌환경정비		10,653,030	9,684,844	968,186	90.9
			농촌마을 종합개발	6,851,429	6,227,715	623,714	90.9
			농촌마을 종합개발	110,344	40,158	70,186	36.4	명시이월
			농촌생활환경정비사업	1,143,000	1,022,467	120,533	89.5
			농촌생활환경정비사업	235,257	201,504	33,753	85.7	명시이월
			농촌테마공원조성	2,193,000	2,193,000	0	100.0
			농촌고령자공동시설지원시범사업	120,000	0	120,000	0.0
		농업기반시설정비		11,289,469	8,017,093	3,272,376	71.0
			농업생활용수보수및보강	313,457	240,565	72,892	76.7
			한발대비용수개발	637,500	134,446	503,054	21.1
			경지정리지구보수 및보강	145,793	145,793	0	100.0
			농업용 배수로정비	67,000	1,081	65,919	1.6
			농업용 배수로정비	8,000	8,000	0	100.0	명시이월
			농업용 배수로정비(보조)	507,000	79,610	427,390	15.7
			농업용 배수로정비(보조)	43,421	42,735	686	98.4	명시이월
			농로확포장	254,450	199,980	54,470	78.6
			농로확포장	52,000	52,000	0	100.0	명시이월
			농로확포장(보조)	135,000	114,720	20,280	85.0
			농로확포장(보조)	75,311	75,311	0	100.0	명시이월
			기계화경작로확포장	1,897,000	1,862,466	34,534	98.2
			기계화경작로확포장	32,029	32,029	0	100.0	명시이월
			국유재산 관리 개선지원	3,200	3,080	120	96.3
			수리시설개보수	4,764,000	4,690,912	73,088	98.5
			수리시설개보수	374,308	276,990	97,318	74.0	명시이월
			재해예방사업	1,600,000	0	1,600,000	0.0
			저수지준설	380,000	57,375	322,625	15.1
	재무활동			591,316	577,381	13,935	97.6
		보전지출		591,316	577,381	13,935	97.6
			보전지출	591,316	577,381	13,935	97.6
	행정운영경비			71,271	49,690	21,581
		기본경비		71,271	49,690	21,581	69.7
			기본경비	71,271	49,690	21,581	69.7

2015 주요성과

□ 성      과

◦ 농업인 복지지원

▸ 농업인 자녀 학자금 지원              : 302명, 290백만원

▸ 농촌보육교사 특별근무수당 지원         : 306명, 303백만원

▸ 출산여성 농가도우미 및 영농도우미 지원 :  45명,  22백만원

◦ 쌀 경쟁력 제고를 위한 기반 확충

▸ 광역방제기(광역살포기) 지원        : 1대, 140백만원

▸ 쌀 생산단지(친환경,우수브랜드)지원  : 154ha, 113백만원

▸ 벼 육묘용 상토 지원                : 10,000ha, 1,000백만원

◦ 친환경농업 육성

▸ 토양개량제(규산질,석회질) 지원            : 15,345톤, 2,144백만원

▸ 유기질비료(혼합유기질,퇴비 등) 지원       : 24,004톤, 2,154백만원

◦ 지역발전 역량강화 및 농촌 기초생활 인프라 확충

▸ 전북형 농촌관광거점마을 육성 대상마을 선정 : 산들강 웅포마을

▸ 7개권역 사업과 2개 농촌중심지 활성화 사업추진

- 용머리, 함라, 미륵산, 다송, 천년초, 천서, 하남 / 여산면, 황등면

▸ 농촌테마공원 조성(79,430㎡)

- 방문자센터, 농경체험장, 주말농장, 서동선화이야기동산, 마공원 등

2015 주요업무 결산

	□	농업인 복지 지원
	□	경관보전 직접 지불제 지원
	□	쌀경쟁력제고사업
	□	친환경농업 육성 지원
	□	밭농업 직접 지불제 지원
	□	전북형 농촌관광 거점마을 육성사업
	□	농촌마을 종합개발 사업
	□	농촌 중심지 활성화 사업
		농촌테마공원조성사업
		금강EH(Eco&History) tour 조성
		농업기반시설정비
		농촌 생활환경 정비(용동)
		저수지 정비사업(보조)

1		농업인 복지 지원

○ ○	농업인 복지지원으로 경제적 부담경감 및 삶의 질 향상 취약농가의 안정적인 영농활동과 기초생활 유지 도모

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 :  2015. 1 ~ 12월

◦ 사 업 량 :  823명

◦ 사 업 비 :  977백만원(국비 209, 도비 200, 시비 560, 자부담 8)

◦ 사업내용

사 업 명	사업량	사 업 내 용
농업인자녀 학자금지원	430명/ 495백만원	▸대상 : 소유농지 50,000㎡미만 농업인 자녀 (고등학교) ▸내용 : 입학금 및 수업료 전액
출산여성 농가도우미 지원	16명/ 38백만원	▸대상 : 출산 또는 출산예정 여성농업인 ▸기준 : 출산전 30일 ~ 출산후 150일 기간중 60일
영농도우미 농가부담금 지원	47명/ 8백만원	▸대상 : 사고․질병으로 영농활동이 곤란한 80세 이하의 농업인에 대해 연간 10일 이내 영농작업 도우미 지원
농촌보육교사 특별근무수당 지원	330명/ 436백만원	▸대상 : 농촌지역 보육시설에 근무하는 보육교사 ▸기준 : 11만원/월 특별근무수당 지원

□ 추 진 실 적

◦ 농업인 자녀 학자금 지원 (1 ~ 3분기)       : 302명, 290백만원

◦ 출산여성 농가도우미 및 영농도우미 지원   :  45명,  22백만원

◦ 농촌보육교사 특별근무수당 지원 (1 ~ 9월)  : 306명/월, 303백만원

□ 마무리 대책

◦ 농업인 자녀 학자금 지원 (4분기)                   : 2015. 12월

◦ 출산여성 농가도우미 신청접수 및 지원             : 수시

◦ 영농도우미 농가부담금 지원(농협중앙회 농정지원단) : 2015. 12월

◦ 농촌보육교사 특별근무수당 지원                   : 매월

2		경관보전 직접지불제 지원

○	지역별 특색있는 경관형성을 위한 작물 재배 및 마을경관보전활동을 통해 지역사회 활성화 도모

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2015. 1 ~ 12월

◦ 사 업 량 : 1,064ha (경관 737, 준경관 327ha)

◦ 사업대상 : 6개면 11개지구 (오산 6, 황등 1, 함라 1, 웅포 1, 성당 1, 용안 1)

◦ 사 업 비 : 1,740백만원 (국비 1,218, 도비 174, 시비 348)

◦ 지급기준 : 경관작물 170만원/ha, 준경관작물 100만원/ha, 활동비 15만원/ha

▸경 관 작 물 : 유채, 헤어리베치, 메밀, 코스모스, 해바라기 등

▸준경관작물 : 밀, 보리(청보리, 겉보리 등), 이탈리안라이그라스 등

◦ 사업내용 : 경관작물의 재배관리 및 마을경관가꾸기 등 경관보전활동

□ 추 진 실 적

◦ 2016년 경관보전직불제(‘15년 동계파종) 수요조사  : 2015. 3월

▸12개지구, 1,490ha(경관 781, 준경관 709)

◦ 경관작물 재배관리 이행점검 및 자료입력 : 5월 / 농산물품질관리원

◦ 두동편백마을 등 8개지구 체험행사 추진 : 2015. 5. 1～ 15일/ 300여명

◦ ‘16년 경관보전직불제 신청지구 등 사업지침 설명회 개최 : 2015. 9월

◦ 경관보전직불금 보조금 지급 : 498농가, 1,137백만원

□ 마무리 대책

◦ 마을경관보전 활동상황 점검 및 활동비 지급          : 2015. 12월

◦ 2016년 지원 대상지역 확정 및 협약체결              : 2015. 12월

3		쌀 경쟁력 제고사업

○	쌀 품질향상과 생산비 절감을 통한 익산 쌀 경쟁력강화로 농가 소득증대

사 업 명	사 업 량	사 업 비 (백만원)
		계	국비	도비	시비	자부담
합 계		1,527	0	610	610	307
광역방제기지원사업	1대	140		42	42	56
벼공동육묘장(녹화장)지원사업	5동	430		129	129	172
친환경쌀생산단지지원사업	54ha	43		13	13	17
우수브랜드쌀생산단지지원사업	100ha	70		21	21	28
우량종자채종포지원사업	40ha	80		40	40
지력증진(볏짚환원)지원사업	3,404.2ha	680		340	340
종자소독기지원사업	25대	84		25	25	34

□ 사 업 개 요

□ 추 진 실 적

◦ 공동방제를 위한 광역살포기 지원             : 1대   / 140백만원

◦ 벼 공동육묘장(녹화장) 지원사업 추진          : 5동   / 430백만원

◦ 친환경쌀 및 우수브랜드쌀 생산단지 조성 추진 : 2개소 / 154ha

◦ 우량종자채종포 단지별 포장검사              : 8개소 / 40.3ha

◦ 종자소독기 지원                             : 25대 중 17대 완료

□ 마무리 대책

◦ 우량종자 채종포 지원사업 종자검사 및 보조금 지급  : 2015. 11월

◦ 지력증진 사업 현장 확인 및 보조금 지급               : 2015. 11. ~ 12월

◦ 보조사업 마무리 점검, 보조금 지출 및 정산검사     : 2015. 12월

4		친환경농업 육성 지원

○	농업과 환경의 조화로 지속가능한 농업생산, 환경보전 및 농산물 신뢰 확보

사 업 명	사 업 량	사 업 비 (백만원)
		계	국비	도비	시비	자부담
합 계		5,167	2,926	253	1,701	287
토양개량제 지원	15,345톤	2,144	1,480	190	474
유기질비료 지원사업	24,004톤	2,154	1,357		797
친환경농산물인증비용 지원	171건	69		21	48
유기농업자재지원사업	468ha	446	89		134	223
친환경유기농업육성지원사업	261ha	140		42	98
고품질스테비아쌀부가가치향상지원	1,169ha	214			150	64

□ 사 업 개 요

□ 상반기 추진실적

◦ 토양개량제 지원(공급)                         : 14개면․동  / 15,345톤

◦ 유기질비료 지원자 선정 및 농가별 공급        : 6,375농가 / 24,004톤

◦ 친환경농산물인증비용 지원 대상자 확정        :   171건 /  636ha

◦ 유기농업자재 지원 대상자 확정                : 242농가 / 468ha

◦ 친환경유기농업육성 지원사업 대상자 확정      : 213농가 / 261ha

◦ 고품질스테비아쌀부가가치향상 지원대상자 확정  : 41단체  / 1,169ha

□ 마무리 대책

◦ 토양개량제 지원사업 살포 확인                : 2015. 11월

◦ 보조사업 마무리 점검, 보조금 지출 및 정산검사   : 2015. 12월

5		밭농업 직접지불제 지원사업

○ ○	한･중 FTA 등 밭작물 재배농가 피해보전 밭작물 재배농가의 안정적인 소득보전 및 밭작물 생산기반 유지

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2015. 1 ~ 12월

◦ 사 업 비 : 1,498백만원

◦ 사 업 량 : 5,836농가, 129,242ha

◦ 사업대상 : 지목에 상관없이 밭농업에 종사하는 농업경영체

◦ 지원품목 : 밭에 재배하는 모든 품목(휴경･시설 포함)

◦ 지원단가

▸밭고정직불금(모든품목) : 25만원/ha

▸밭농업직불금(동･하계26개품목) : 40만원/ha

▸밭농업직불금(논 재배식량･사료작물) : 50만원/ha

□ 추 진 실 적

◦ 밭농업 직불제 홍보(보도자료,내고장소식지 등)  : 6회

◦ 밭농업 직불제 신청 접수                      : 5,836농가 / 5,540ha

▸밭농업직불제(동계) : 1,279농가, 3,573ha

▸밭농업직불제(하계) : 4,557농가, 1,967ha

◦ 밭농업 직불제 현지조사 및 이행점검           : 5,836농가 / 5,540ha

▸농산물품질관리원 및 농어촌공사 현장조사 완료

□ 마무리 대책

◦ 밭농업 직불제 대상자 확정 및 직불금 지급     : 2015. 11월

6		전북형 농촌관광거점마을 육성사업

○ ○	전라북도가 농촌관광 활성화 기반이 집적화 된 마을을 거점마을로 선정 인접 마을간 관광콘텐츠 및 체험프로그램의 연계로 사람 찾는 활기찬 농촌 조성

□ 사 업 개 요

◦ 거점마을 : 산들강 웅포마을(2015. 4. 29 선정)

◦ 사업기간 : 2015년 ~ 2018년(4년간)

◦ 총사업비 : 3,000백만원(지특 1,500  시비 1,500)

▸ 2015년도 : 362백만원(지특 181  시비 181)

◦ 사업내용

▸ 하드웨어 : 거점마을 인프라 구축(다목적 체험관, 실외 체험장 등)

▸ 소프트웨어 : 농촌관광 콘텐츠개발 ․ 교육 ․ 상품개발 ․ 통합마케팅

□ 추 진 실 적

◦ 거점마을 선정(전라북도/산들강웅포마을)	: 2015. 4. 29.

◦ 선정마을 현장정밀조사(전북농촌관광지원센터)	: 2015. 5. 22.

◦ 세부시행계획 승인(전라북도)	: 2015. 7. 24.

◦ 보조금교부 결정(전라북도)	: 2015. 8. 25.

◦ 농어촌체험지도사 양성과정 수료	: 2015. 9. 11.

▸ 산들강 웅포마을 위원장 외 3인

□ 마무리 대책

◦ 체험프로그램 개발 및 사업추진	: 2015. 11 ~ 12

◦ 기본계획수립 용역	착수	: 2015. 12

7		농촌마을 종합개발사업

○ ○	농촌 경관개선 및 생활환경 정비를 통한 기초생활 수준 향상 주민역량강화 및 소득기반 확충을 통한 지속가능 농업경영 도모

□ 사 업 개 요

(단위 : 백만원)

사 업 명	총 괄				2015년도
	기간	사업비		주요사업	사업비		주요사업
합 계		국도시	29,575 20,701 2,048 6,826		국도시	4,581 3,208 310 1,063
용 머 리 권 역	2011 ~ 2015	국도시	5,396 3,777 378 1,241	-가로경관 정비 -다목적복지센터 -친환경음식체험관 -친수공간 정비	국도시	842 591 59 192	-세부설계용역 추진 -시행계획수립 -공사착공
함라권역	2011 ~ 2015	국도시	6,999 4,899 490 1,610	-함라문화센터 -저온저장시설 -농산물가공공장	국도시	1,575 1,101 110 364	-함라문화센터 신축 -농산물 가공공장 신축
미 륵 산 권 역	2013 ~ 2016	국도시	4,100 2,870 287 943	-권역센터 주차장 -다목적센터 신축 -미륵산등산로정비	국도시	518 363 36 119	-세부설계용역 추진 -공사발주
다송권역	2013 ~ 2017	국도시	4,800 3,360 336 1,104	-매화동산조성 -권역활성화센터 -경관조성	국도시	764 535 53 176	-기본계획 수립 -세부설계용역 추진
천 년 초 권 역	2014 ~ 2017	국도시	4,125 2,887 289 949	-천년고을복지관 -농산물가공시설 -천년초체험관 등	국도시	178 125 12 41	-기본계획 수립 -세부시행계획 수립 -공사발주
천서권역	2015 ~ 2018	국도시	3,826 2,678 268 880	-로컬푸드 판매장 -복합가공시설 -실버타운형 회관	국도시	573 401 40 132	-지역역량강화 -기본계획 수립
하남마을	2015 ~ 2017	국시	329 230 99	-지역역량강화 -농산물가공공장 (양파, 마늘)	국시	131 92 39	-지역역량강화 -기본계획 수립

※ 한국농어촌공사 익산지사(대행)

□ 추 진 실 적

◦ 용머리권역

▸‘15년도사업 시행계획 수립용역 추진	: 2015.  1 ~ 10

▸‘15년도 역량강화사업 추진	: 2015.  2 ~ 10

◦ 함라권역

▸함라문화센터 신축공사 추진	: 2015.  1 ~ 10

※ 전체 공정율(2015. 10월말 기준) - 85%

▸농산물 가공공장 신축 설계용역 추진	: 2015.  8 ~ 10

▸‘15년도 역량강화사업 추진	: 2015.  1 ~ 10

◦ 미륵산권역

▸시행계획 수립 용역 추진	: 2015.  1 ~ 10

▸‘15년도 역량강화사업 추진	: 2015.  2 ~ 10

◦ 다송권역

▸기본계획 수립	: 2015.  6. 23

▸‘15년도 역량강화사업 추진	: 2015.  3 ~ 10

◦ 천년초권역

▸기본계획 수립	: 2015.  1. 13

▸시행계획 수립 용역 추진	: 2015.  4 ~ 10

▸경관형성계획 용역 추진	: 2015.  6 ~ 10

◦ 천서권역(2015 신규사업)

▸‘15년도 역량강화사업 추진	: 2015.  4 ~ 10

▸기본계획 수립 용역 추진	: 2015.  4 ~ 10

◦ 하남마을(2015 신규사업)

▸사업계획 관련부서 협의(익산지방국토관리청)	: 2015.  4 ~ 9

□ 마무리 대책

◦ 용머리권역

▸‘15년도사업(2단계) 시행계획 수립	: 2015. 11

▸‘15년도사업(2단계) 공사발주 및 추진	: 2015. 11 ~ 12

◦ 함라권역

▸시행계획(변경) 수립	: 2015. 10월말

▸함라문화센터 신축 마무리공사 추진	: 2015. 11 ~ 12

▸농산물 가공공장 건축허가 및 공사추진	: 2015. 11 ~ 12

◦ 미륵산권역

▸시행계획 수립	: 2015. 11

▸‘15년도 역량강화사업 추진	: 2015. 11 ~ 12

◦ 다송권역

▸시행계획수립 용역 추진	: 2015. 11 ~ 12

▸‘15년도 역량강화사업 추진	: 2015. 11 ~ 12

◦ 천년초권역

▸시행계획 수립	: 2015. 11

▸공사발주 및 착공	: 2015. 11 ~ 12

◦ 천서권역(2015 신규사업)

▸기본계획 관련부서 협의(전북도, 익산시)	: 2015. 11

▸기본계획 수립	: 2015. 12

▸‘15년도 역량강화사업 추진	: 2015. 11 ~ 12

◦ 하남마을

▸기본계획 및 세부설계용역 발주 및 착수	: 2015. 11

▸지역역량강화사업 발주 및 착수	: 2015. 11

8		농촌 중심지 활성화 사업

○ ○	읍면소재지 생활환경종합정비 및 기초시설 확충 정주여건 향상 읍면소재지 문화 및 복지시설 확충 농어촌 중심거점 육성

□ 사 업 개 요

(단위 : 백만원)

사업명	총 괄				2015년
	기간	사업비		주요사업	사업비		주요사업
합 계		국도시	11,800 8,260 1,770 1,770		국도시	1,958 1,371 294 293
여산면	2012 ~ 2015	국도시	7,000 4,900 1,050 1,050	-어울림센터 신축 -체육공원 조성 -중심상가 간판정비 -재래시장 정비	국도시	1,238 867 186 185	-어울림센터 준공 -체육공원 준공 -중심지 간판정비 -재래시장 정비
황등면	2015 ~ 2019	국도시	4,800 3,360 720 720	-체육공원 리모델링 -석재쉼터 조성 -고향역 주차장 조성 -풍물시장 정비 -중심지 간판정비	국도시	720 504 108 108	-지역역량 강화 -기본계획 용역 -가로경관 용역 -편입용지 매입

※ 한국농어촌공사 익산지사(대행)

□ 추 진 실 적

◦ 여산면 소재지 활성화 사업

▸지역경관 개선(간판 및 재래시장 정비) 추진	: 2015.  3 ~ 10

▸기반시설 확충(어울림센터 및 체육공원 등) 추진	: 2015.  3 ~ 10

※ 전체 공정율(2015. 10월말 기준) - 88%

▸시설 운영계획 수립(인력 및 예산)	: 2015.  9. 10

◦ 황등면 소재지 활성화 사업(2015 신규사업)

▸기본계획 수립 용역 착수	: 2015.  5. 27

▸역량강화사업 발주	: 2015.  9. 25

□ 마무리 대책

◦ 여산면 소재지 활성화 사업

▸분야별 마무리공사 추진	: 2015. 11 ~ 12

▸여산면 소재지 활성화 사업 준공	: 2015. 12

◦ 황등면 소재지 활성화 사업

▸기본계획 수립	: 2015. 12

▸지역역량강화 사업 착수	: 2015. 12

9		농촌테마공원 조성사업

○ ○	자연 친화적 휴식･체험공간 등 조성으로 농촌 정주환경 개선 도시와 농촌 교류촉진 등을 통한 지역경제 활성화 도모

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2010 ~ 2015(6개년)

◦ 위    치 : 금마면 신용리 일원

◦ 사업규모 : 79,430㎡

◦ 주요시설 : 방문자센터, 농경체험장, 주말농장, 유실수원, 숙박시설 등

◦ 사 업 비 : 13,993백만원(국비 5,000,  시비 8,393,  민자 600)

▸2015년도 예산 : 2,793백만원(시비 2,193, 민자 600)

□ 추 진 실 적

◦ 농촌테마공원 조성사업 추진(총 공정율 85%)	: 2015.  1 ~ 10

◦ 농촌테마공원 운영관리계획 수립	: 2015.  9. 10

◦ 농촌테마공원 운영조례 입법예고	: 2015.  9. 30

□ 마무리 대책

◦ 농촌테마공원 조성사업 마무리공사 추진	: 2015. 11 ~ 12

◦ 농촌테마공원 운영조례 제정	: 2015. 12

◦ 농촌테마공원 조성사업 준공	: 2015. 12. 20

◦ 시설물 인계인수(농어촌공사 ⇒ 익산시) 및 운영	: 2016.  1

10		금강 EH(Eco&History) tour 조성사업

○ ○	금강 수변 풍부한 자연경관과 수자원을 연계 관광 자원화 4계절 체험 및 체류형 관광지로 조성 북부권 관광 활성화 도모

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2014. 1. ~ 2015. 11.

◦ 사업지역 : 익산시 용안면 313-12 일원(국가하천 금강 일원)

◦ 총사업비 : 1,765백만원(국비 1,390 시비 375)

◦ 사업내용

‣ 성당포구마을정비 및 얼음스케이트장, 금강체험관 방갈로 설치 등

‣ 용머리권역 상생관 에너지자립시설설치 및 자전거도로정비(목교설치)

‣ 생태습지 및 뚝방길 바람개비 설치, 관목식재거리조성

□ 추 진 실 적

◦ 하천점용 및 관련사항 협의                         : 2015. 2. ~ 3.

◦ 억새단지 추가시설(바람개비 설치) 하천점용 협의     : 2015. 9.

◦ 공사 추진(공정율 80%)                             : 2015. 9.

□ 마무리 대책

◦ 공사 준공                                          : 2015. 11.

◦ 준공 시설물 관리이관 및 위·수탁계약 체결           : 2015. 11.

▸금강체험관 보완공사 시설물 위수탁계약 : 성당포구영농법인

▸용머리권역 보완공사 시설물 위수탁계약 : 용머리권역추진위원회

11		농업 기반시설 정비

○ ○	농업기반시설 보수·보강 및 확충을 통한 영농 편익증진 농업인이 안전하고 쾌적하게 영농할 수 있는 기반조성

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2015.1. ~ 12.

◦ 총사업비 : 8,083백만원(국비 5,139  도비 926  시비 2,018)

◦ 사업내용

(단위 : 백만원)

사 업 명		사 업 비				비 고
		계	국비(광특)	도비	시비
합 계		8,083	5,139	926	2,018
경지정리보수 및 보 강		146			146	부담금
농업생활용수 보수 및 보강		313			313	연 중
농업용배수로정비		574		507	67	12개소
농로확포장		389		135	254	28개소
기계화경작로 확포장 (120개소)	익산시	590	413	88	89	31개소
	공대행	1,307	915	196	196	89개소
수리시설개보수 (225개소)	익산시	1,041	833		208	32개소
	공대행	3,723	2,978		745	193개소

□ 추 진 실 적

◦농업생활용수 보수 및 보강(유지보수) - 연중

◦농업용 배수로 정비 10개소

◦농로확포장 25개소, 기계화경작로확포장 119개소(공기관89개소, 시30개소)

◦수리시설 개보수 144개소(공기관 113개소, 시31개소)

□ 마무리 대책

◦영농시기 도래로 미추진 대상사업 연내 완료 추진

▸기계화경작로확포장 1개소, 수리시설 개보수 81개소, 배수로정비 2개소

◦토지사용승낙 미징구로 인한 사업대상지 연내 위치 변경 사업 추진

▸농로확포장 사업 3개소

12		농촌 생활환경 정비(용동)

○ ○	농촌의 생활환경,산업기반, 편익복지 시설의 종합 정비·확충 농촌 지역 정주권 정비로 농민의 복지 향상과 국토 균형개발 도모

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2015. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 1,143백만원(지특800, 시비 343)

◦ 사업내용 : 마을기반정비 등 55건

▸포장덧씌우기 10건, 농로포장 35건, 배수로정비 9건, 석축쌓기 1건

□ 추 진 실 적

◦ 사업대상지 선정                                  : 2015. 3.

◦ 사업 추진계획 전북도 제출                        : 2015. 3.

◦ 공사 추진                                        : 2015. 3. ~ 10.

▸ 총 55건중 53건 준공

□ 마무리 대책

◦ 영농시기 도래로 인한 미발주 사업 연내 사업 완료 추진

▸ 배수로 정비 2건

13		저수지 정비사업(보조)

○ ○	저수지를 정비하여 안전성 확보 및 하류부 피해를 사전에 예방 저수지 준설 시행하여 안정적이고 항구적인 용수 확보로 영농 편익 증대

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2015. 09. ~ 2016. 3.

◦ 사 업 비 : 1,980백만원(국비1,600 시비 380)

◦ 사업내용 : 저수지 정비 및 준설

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 비				비 고
	계	국비(광특)	도비	시비
합 계	1,980	1,600	380
저수지 정비사업	1,600	1,600			4건
저수지준설사업	380		380		8건

□ 추 진 실 적

◦ 보조금 신청 및 교부                                  : 2015.  9.

◦ 공사 추진                                            : 2015. 10.

▸ 저수지 정비사업 설계용역 발주 4건

▸ 저수지 준설사업 8건중 3건 준공(5건 공사중)

□ 마무리 대책

◦ 저수지 정비공사 조기 착공 및 시행으로 연내 사업 완료 추진

◦ 저수지 준설사업 11월 중 완료 예정