2015.  11.

제189회 익산시의회(임시회)

2015 주요업무 결산보고

상하수도사업단

하수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2015 예 산 집 행 실 적
□	2015 주 요 성 과
□	2015 주 요 업 무 결산

비전 및 중점추진방향

	비 전
완벽한 하수처리로 녹색 청정 익산건설

		전 략 목 표
◦ ◦	하수처리 운영 효율 증대로 쾌적한 주거환경 제공 수질개선을 통한 삶의 질 향상으로 시민만족 행정 구현

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	정화된 하수를 이용한 방류수 재이용 및 생태습지공원 조성 하수관거사업 추진으로 방류지역의 수질보전 완벽한 하수처리를 위한 과학적 하수처리시설 설치

일  반  현  황

□ 기       구

					하수도과
하수행정			하수시설			하수운영			생활하수			하수관리

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별								비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능	계약
정 원	27		1	8	7	5	6	-	-
현 원	30		1	11	9	6	3	-	-	육아휴직 1명 (16.6.30.까지)
증 감	3			3	2	1	▵3

□ 사 무 분 장

◦ 하수행정 : 하수행정종합계획수립조정, 하수도특별회계 현금출납 및 금고감독, 입찰 및 계약, 하수도사용료․원인자부담금 부과징수, 공기업평가 결산

◦ 하수시설 : 하수정비기본계획 수립, 하수관거임대형민간투자사업(BTL),하수관거정비사업, 유천생태습지 및 생태하천 복원사업, 북부하수처리장 주민숙원사업

◦ 하수운영 : 하수슬러지처리시설설치사업, 공공하수처리시설 설치․개선․운영관리, 3산단 폐수종말처리시설 운영관리

◦ 생활하수 : 개인하수처리시설설치신고․준공․지도점검, 분뇨수집․운반업 허가 및 지도점검, 지하수개발이용 허가․신고․준공, 공중화장실, 배수설비협의

◦ 하수관리 : 시내일원하수도공사, 하수생활민원처리, 주민숙원사업, 맨홀정비, 준설원 관리, 온천지구 지정 및 관리

□ 하수도 사용 현황

(단위 : 전)

구 분 업 종	계	상하수도	지 하 수	비 고
계	40,655	39,986	669
가 정 용	28,577	28,512	65
일 반 용	11,384	10,910	474
대 중․산업용	694	564	130

□ 하수도 관로 현황

(단위 : km)

구 분	시설계획	시 설	미시설	설치율(%)	비 고
계	1,413	1,248	165	88.3
우 수 관	815	799	16	98.1
오 수 관	537	396	141	73.7
차 집 관	61	53	8	86.8

□ 하수처리시설 현황

시 설 명	개 소	처리용량	비 고
계	27	139,521㎥/일
익산공공하수처리시설	1	100,000㎥/일
함열공공하수처리시설	1	6,000㎥/일
북부공공하수처리시설	1	30,000㎥/일
금마공공하수처리시설	1	1,100㎥/일
여산공공하수처리시설	1	600㎥/일
소규모 공공하수처리시설	21	1,671㎥/일
분뇨처리장	1	150㎥/일

2015 예산집행실적

【 2015. 10. 15. 현재 】                                                        (단위:천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율	비고
하수도과				67,324,301	39,069,771	28,254,530	58.0
	하수도사업비용			35,176,386	28,906,924	6,269,462	82.2
		영업비용		35,107,586	28,900,956	6,206,630	82.3
			관거비	17,579,227	12,348,391	5,230,836	70.2
			펌프장비	145,700	100,718	44,982	69.1
			처리장비	14,806,999	14,515,009	291,990	98.0
			일반관리비	2,575,660	1,936,838	638,822	75.2
		영업외비용		22,800	5,968	16,832	26.2
			차입금이자상환	22,800	5,968	16,832	26.0
		예비비		46,000	0	46,000	0.0
			예비비	46,000	0	46,000	0.0
	자본적지출			32,147,915	10,162,847	21,985,068	32.0
		유형자산취득		28,495,977	9,818,099	18,677,878	34.5
			구축물	28,485,927	9,808,059	18,677,868	34.4
			공기구비품	10,050	10,040	10	100
		비가동설비자산취득		2,209,429	85,830	2,123,599	4.0
			건설중인자산	2,209,429	85,830	2,123,599	4.0
		비유동부채상환		177,200	132,900	44,300	75.0
			정부차입금원금상환	177,200	132,900	44,300	75.0
		기타자본적지출		1,065,309	126,018	939,291	12.1
			정부보조금반환	1,051,509	113,183	938,326	10.8
			기타자본적지출	13,800	12,835	965	93.0
		예비비		200,000	0	200,000	0.0
			예비비	200,000	0	200,000	0.0

2015 주요성과

□ 오․우수관 분리로 하수처리시설 효율개선

◦ 함열․춘포처리구역 하수관거 정비사업 추진

▸관거정비 4.3km,  배수설비 547개소

◦ 천서왕궁지구 하수관거 정비사업 추진

▸관거정비 13.2km, 중개펌프장 2개소, 맨홀펌프장 3개소

◦ 화정지구 소규모마을하수처리장 설치사업 추진

▸관거정비 8km

□ 공공하수처리장 최적운영을 통한 수질환경개선

◦ 총27개소(139,521㎥/일) 하수처리시설의 정상가동 및 유지관리

◦ 하수처리시설 적정운영 관리를 통한 처리효율 향상 및 수질오염 저감

□ 유천 생태습지 및 생태하천 복원사업으로 친수문화공간 조성

◦ 생태습지 및 생태수로 수목 및 수생식물 식재, 산책로 조성 등

◦ 이용객 안전을 위한 CCTV 가로등 설치

□ 읍면동 소규모 하수도 시설공사 및 생활민원 신속처리로 신뢰받는 하수행정 구현

◦ 하수도 정비 L=10㎞, 하수도기계준설 1,800㎥

◦ 365일 누수없는 비상대기 근무로 1,665건의 하수생활민원 처리

◦ 원활한 하수배제를 위한 맨홀 및 하수도 준설 869건, 파손 하수관로 복구 및 맨홀 단차조정 796건 실시

2015 주요업무 결산

		함열․춘포 처리구역 하수관거 정비사업 유천생태습지 조성 및 생태하천 복원사업 천서․왕궁지구 하수관거 정비공사 화정지구 소규모마을하수처리장 설치사업 읍면동지역 하수도 시설 및 준설사업

1		함열․춘포처리구역 하수관거 정비사업

○ ○	오·우수관 분리로 공공하수처리시설 운영효율 증대 및 방류수계 수질개선 정화조 폐쇄로 관리비용 절감 및 주거환경개선

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 함열처리구역(용안 난포리, 낭산 삼담리, 성당 성당리 일원)

춘포처리구역(춘포리 신촌마을, 석탄동 신복마을 일원)

◦ 사업내용 : 오수관로 33.9km, 배수설비 1,098가구

▸함열처리구역 : 오수관로 22.5km, 배수설비 592가구

▸춘포처리구역 : 오수관로 11.4km, 배수설비 506가구

◦ 사 업 비 : 24,489백만원(국비 17,142 도비 60 시비 7,287)

▸2015년 : 6,304백만원(국비 4,438 도비 60 시비 1,806)

□ 추 진 실 적 ( 전체공정 90% )

◦ 함열처리구역 : 오수관로 L=22.1㎞, 배수설비 527가구

◦ 춘포처리구역 : 오수관로 L=10.2㎞, 배수설비 286가구

□ 마무리 대책

◦ 사업 추진 및 완료                         : 2015. 10. ~ 2015. 12.

▸함열처리구역 : 오수관로 L=0.4㎞, 배수설비  65가구

▸춘포처리구역 : 오수관로 L=1.2㎞, 배수설비 220가구

2		유천 생태습지 조성 및 생태하천 복원사업

○ ○	하수종말 방류수 재이용으로 하천의 자생기능 및 수생태 건강성 회복 환경밀집지역의 수질 및 환경개선으로 집단민원해소

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 금강동 993-1번지 일원

◦ 사업규모 : 생태하천복원 L=1.3km / 생태습지조성 134,521㎡

◦ 총사업비 : 28,550백만원(국비 14,061 시비 14,489)

▸2015년 사업비 : 1,374백만원(전액 시비)

◦ 사업기간 : 2009. 1.  ~  2015. 11.

□ 추 진 실 적 ( 전체공정 90% )

◦ 생태습지 산책로(L=2.7km) 포장 및 목교 설치, 수목 식재 등

◦ 생태습지 내 가로등 및 CCTV 배선 작업

◦ 하천(0.9km) 돌쌓기 및 식생매트 설치, 제방도로포장

□ 마무리 대책

◦ 사업 추진 및 완료                         : 2015. 10. ~ 2015. 11.

▸생태습지 수목 및 수생식물 식재, 산책로 포장 마무리

▸가로등(46주) 및 CCTV(10개) 설치

3		천서․왕궁지구 하수관거 정비공사

○	새만금 수질개선 환경개선 종합대책의 일환으로 만경강 및 새만금호 수질 오염을 저감하고 지역주민 보건위생 향상 및 쾌적한 생활환경 조성

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 왕궁면 온수리 17-55번지 일원(익산, 금오, 신촌농장), 익산시 춘포면 천서리, 오산리, 창평리 일원

◦ 사 업 량 : 오수관로 45.1km, 배수설비 854개소

◦ 사 업 비 : 25,486백만원(국비17,840 도비764 시비6,882)

▸2015년 : 15,501백만원(국비11,773 도비505 시비3,223)

◦ 공사기간 : 2015. 2. ~ 2017. 2.

□ 추 진 실 적 ( 전체공정 30% )

◦ 공사계약 및 착공                            : 2015. 2. 10.

◦ 주민설명회 개최                             : 2015. 4.  8.

◦ 하수관거 신설(18.15㎞)                       : 2015. 4. ~ 2015. 9.

▸오수관로 L=13.65㎞, 압송관로 L= 4.5km

▸중계펌프장 2개소, 맨홀펌프장 3개소 설치

□ 마무리 대책

◦ 사업 추진 및 완료                          : 2015. 10. ~ 2017. 2.

▸오수관로 L=26.95km, 배수설비 854개소

4		화정지구 소규모마을하수처리장 설치사업

○ ○	금강 수계지역의 수질오염을 예방 맑은 물 보전에 기여 공공수역의 수질개선과 지역주민의 공중위생 향상 기여

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 망성면 내촌리 일원(교황, 지장, 내촌, 신흥, 방축, 화정, 미동, 동촌)

◦ 사업내용 : 오수관로 10.4㎞, 마을하수처리장 120㎥/일, 배수설비 256개소

◦ 사 업 비 : 5,464백만원(국비 3,825 시비 1,639)

▸2015년 : 4,150백만원(국비 3,325 시비 825)

◦ 공사기간 : 2015. 3. ~ 2017. 2.

□ 추 진 실 적 ( 전체공정 38% )

◦ 계약 체결 및 공사 착공                       : 2015. 3. 2.

◦ 주민설명회 개최                              : 2015. 4. 7.

◦ 하수관거 신설(8㎞)                           : 2015. 4. ~ 9.

□ 마무리 대책

◦ 사업 추진 및 완료                          : 2015. 10. ~ 2017. 2.

▸오수관로 L=2.4km, 배수설비 256개소

5		읍․면․동지역 하수도 시설 및 준설사업

○ ○	우기철 침수피해 예상지역의 하수도 정비로 쾌적한 주거환경 도모 하수관내 슬러지 준설로 악취불편 해소

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원(29개 읍면동)

◦ 사 업 량 : 하수도정비 L=10㎞, D300~1200㎜

◦ 사 업 비 : 1,562백만원(국비 184 시비 1,378)

▸하수도 시설공사(L=10㎞ 정도)

▸주민참여예산 사업(24개소)

▸하수도 기계준설

▸싱크홀 및 하수관 파손 긴급 복구공사 등

◦ 공사기간 : 2015. 1. ~ 2015. 12.

□ 추 진 실 적 ( 전체공정 85% )

◦ 읍면동 사업대상지 현장조사 및 설계         : 2015. 3. 2.

◦ 공사 발주 및 추진                          : 2015. 4. 7.

□ 마무리 대책

◦ 사업 추진 및 완료                        : 2015. 10. ~ 2015. 12.

▸소파보수 등 유지관리