2016. 1.

제191회 익산시의회(임시회)

2016 주요업무계획

	국가식품클러스터지원단

순  서

□	일반현황	………	3
□	식품클러스터지원과	………	5

일   반   현   황

□ 기구 및 정․현원

◦ 기    구  ……………………………………………… 1과 3계

							국가식품클러스터지원단
								식품클러스터지원과
						국가식품						유치홍보			지원협력

◦ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	12	1	1	3	3	4	0
현 원	13	1	1	5	4	1	1
증 감	1	0	0	2	1	△3	1

□ 주요업무

부 서	주 요 업 무
식품클러스터 지원과	∙식품전문산업단지조성 지원 및 산업단지 기반시설 확충 ∙국내․외 식품기업 및 연구소 투자 유치 ∙국가식품클러스터 대내․외 교류 협력사업 추진 ∙홍보관 운영 등 국내․외 홍보 및 유치전략 수립 ∙사업지구내 거주자 이주대책수립 및 추진 ∙고품격 정주환경 제공을 위한 배후복합단지 조성

식품클러스터지원과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2015 주요성과
□	2016 주 요 업 무 계 획

비전 및 중점추진방향

	비 전
글로벌 식품시장의 新중심 육성

		전 략 목 표
◦ ◦	식품클러스터의 신속한 구축 국내․외 유수기업 및 연구소 유치

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	동북아 식품시장 선점을 위한 식품전문산업단지의 차질없는 공사추진 기업활동에 유리한 인프라 구축 및 국가식품클러스터 기반시설확충 3대 R&D 및 기업지원시설 건립‧운영으로 푸드폴리스 경쟁력 강화 최적의 기업 유치전략 마련 및 유치활동

일  반  현  황

□ 기       구

						식품클러스터지원과
	국가식품						유치홍보					지원협력

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	12	1	1	3	3	4	0
현 원	13	1	1	5	4	1	1
증 감	1	0	0	2	1	△3	1

□ 사 무 분 장

◦ 국가식품	:	국가식품클러스터 기획조정 국가식품클러스터 대내․외 교류협력 사업추진 국가식품클러스터 인적네트워크 구축
◦ 유치홍보	:	국내외 식품기업 및 연구소 투자 유치 홈페이지 관리, 국내․외 홍보전략 수립 홍보관 운영 및 각종 홍보물 제작
◦ 지원협력	:	식품전문산업단지 조성지원, 산업단지 기반시설 확충 사업지구내 거주자 이주대책수립 및 추진, 소송사무 수행 토지매입․보상사무 지원, 배후복합단지 조성

2015  주 요 성 과

□ 성      과

◦ 국가식품클러스터 산업단지 조성공사 추진

▸ 산업단지 조성공사 추진(공정율 35%)

▸ 문화재 시굴‧발굴조사 추진

- 시굴조사 391천㎡ 완료 / 발굴조사 74천㎡ 중 40천㎡완료(54%)

▸ 지장물 이전 대책반 구성‧운영(전북도, 익산시, LH공사)

▸ 외국인투자지역(116천㎡) 지정‧고시(전북도, ‘15. 10. 12.)

◦ 정부기업지원시설 구축 및 기반시설 확충

▸ 정부기업지원시설 건축(공정율 68%)

▸ 국가식품클러스터 진입도로 공사 착공(7%)        : ‘15.  2. ~

▸ 폐수종말처리시설 건설공사 착공(23%)            : ‘15.  4. ~

▸ 왕궁배수지 송수관로 시설공사 착공(14%)         : ‘15. 10. ~

◦ 투자유치 및 교류협력 활동 전개

▸ MOU체결(20건) : 에이젯시스템(1.6./국내), BTC(1.6./국내), Gold of Prague a.s.(2.25./체코), BGX(3.30./중국), 네오크레마(10.19./국내) 등

▸ 분양계약체결(6건) : 하림식품(1.7.), 조은건강(1.7.), 에이젯시스템(1.9.), 원광제약(1.9.), BTC(10.5.), 네오크레마(12.29.)

▸ 외국인투자신고(2건) : 차오마마(2.10./중국), Gold of Prague a.s.(5.15./체코)

▸ 기업설명회(9회) 및 투자유치 홍보관 운영(11회) : 건강기능성식품협회(3월/국내), 서울 국제식품산업대전(5월/국내), 대한민국식품대전(9월/국내), 아누가식품박람회(10월/독일) 등

▸ 국제식품공동 R&D사업 및 기업공동연구과제 수행 : ‘15. 1. ~ 12.

▸ 제5회 국제식품클러스터 포럼 개최               : ‘15. 11. 17.

2016 주요업무계획

		국가식품클러스터 국가식품클러스터 국가식품클러스터 국가식품클러스터 국가식품클러스터 국가식품클러스터	식품전문산업단지 조성 기반시설 확충 정부기업지원시설 구축 배후복합도시 조성 투자유치 및 교류협력 외국인투자지역 지정‧운영

1		국가식품클러스터 식품전문산업단지 조성

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2009 ~ 2016년(8년)

◦ 위    치 : 익산시 왕궁면 흥암리, 광암리, 동촌리 및 왕궁리 일원

◦ 총사업비 : 3,119억원(보상비 800, 공사비 2,119, 기타 200)

◦ 사업내용 : 국가식품전문산업단지 조성 232만㎡(70만평)

▸ 산업시설용지(제조,연구,물류) 460천평, 상업용지 8천평, 주거용지 23천평

▸ 지원시설용지 27천평, 기반시설용지(도로,공원,폐수처리장 등) 182천평

◦ 사업시행자 : LH공사

□ 추 진 계 획

◦ 산업단지 분양(2차)                                   : ‘16.  2.

▸ 입주심사 및 입주계약 체결(한국산업단지공단)

▸ 산업단지 분양계약 체결(LH공사 전북본부 판매부)

◦ 문화재 발굴조사 완료                                : ‘16.  6.

◦ 산업단지 조성공사 준공                              : ‘16. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 국가식품전문 산업단지 조성을 통한 향후 거대 식품시장으로 성장할 아시아 식품시장의 선점과 지역경제 성장 견인

2		국가식품클러스터 기반시설 확충

□ 사 업 개 요

(단위 : 억원)

구 분	시설규모	사 업 비				예산 확보액			관리부처 (사업 시행자)
		합계	국비	지방비	민자	‘15년까지	‘16년	‘17년이후
합 계		1,088	686	84	318	국 비 322 지방비 23 민 자 64	국 비 194 지방비 61 민 자 138	국 비 170 지방비 0 민 자 116
진입도로	L=4.1km, 4~6차선	426	426	-	-	국 비 259	국 비 65	국 비 102	국토교통부 (익산국토청)
용수공급 시 설	송수관로 D=600, L=10.5km 배수지 Q=8.8천㎥/일 배수관로 D=500, L=1.5km	205	36	84	85	국 비 13 지방비 23 수 공 32	국 비 23 지방비 61 수 공 42	국 비 0 지방비 0 수 공 11	송수관로 (수공) 배수지 (익산시) 배수관로 (LH,익산시)
폐수종말 처리시설	Q=10천㎥/일	350	224	-	126	국 비 50 LH공사 28	국 비 106 LH공사 65	국 비 68 LH공사 33	LH공사
전 기	6만KW/h (6회선, 20년말까지)	60	-	-	60	-	한전 20	한전 40	한국전력공사
도시가스	1.3km (D150~250, 1단계)	40	-	-	40	민자 4	민자 8	민자 28	전북에너지 서비스
통 신		7			7		민자 3	민자 4	kT 등 통신사업자

□ 추 진 계 획

◦ 국가식품클러스터 진입도로공사 추진 및 준공   : ‘15.  2. ~ ’16. 12.

◦ 폐수종말처리시설 건설공사 추진 및 준공      : ‘15.  5. ~ ‘16. 12.

◦ 송수관로 시설공사 추진 및 준공(수자원공사)    : ‘15. 10. ~ ‘16. 12.

◦ 왕궁배수지 건설공사 토지보상 및 발주         : ‘16.  1. ~

◦ 전기, 도시가스 및 통신공사 등 추진           : ‘16.  1. ~ ‘16. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 국가식품클러스터 입주기업 활동에 유리한 기본인프라 조기 구축으로 기업투자유치 활성화 도모

3		국가식품클러스터 정부기업지원시설 구축

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2009 ~ 2020년

◦ 위    치 : 국가식품클러스터 산업단지 내

◦ 총사업비 : 2,416억원(국비 1,616, 지방비 634, 민자 166)

(단위:백만원)

구 분	소요액	예산 확보액				비고
		합 계	‘15년까지	‘16년	‘17년이후
합 계	241,600	241,600	79,295	18,320	143,985
건축비	66,200	66,200	61,392	3,514	1,294
장비비	41,000	41,000	17,903	9,000	14,097
운영비	51,600	51,600	-	3,200	48,400
S/W사업	82,800	82,800	-	2,606	80,194

◦ 사업내용

▸ 6개 H/W사업 : 시설건축(부지 52,675㎡, 연면적 28,705㎡-지하1층, 지상5층)

▸ 10개 S/W사업 : 식품상품화 R&D지원, 기능성식품 개발‧육성 및 인력양성 등

▸ 장비 구축(571종, 410억원)

- ‘15년 까지 : 158종(60억원) 구축(원광대 83종 30억, 전북대 75종 30억)

□ 추 진 계 획

◦ 정부기업지원시설 임시연구소 운영(‘16. 7.) 및 장비 구축(계속)  : ‘16. 1. ~

▸ 운영 계획 : 산학연 교류협력 활성화 및 기업공동기술개발 사업  추진 등

▸ 장비 구축 계획 : 257종(90억원)

◦ 정부기업지원시설 공사 준공(‘16. 7.) 및 입주(’16. 10.)

□ 기 대 효 과

◦ 입주기업 원스톱 지원을 위한 3대 R&D시설 등 지원시설 건립으로 국가식품클러스터 경쟁력 강화 기반 마련

4		국가식품클러스터 배후복합도시 조성

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2014 ~ 2019년(6년)

◦ 위    치 : 국가식품클러스터 산업단지 인근

◦ 총사업비 : 2,503억원(보상비 732, 공사비 1,431, 기타 340)

▸ 민자사업 추진(LH공사 등)

◦ 사업내용 : 배후복합도시 조성 119만㎡(36만평)

▸ 한옥단지, 외국인 맞춤형 주거단지 및 체험관․박물관 등

◦ 개발방식 : 도시개발사업

□ 쟁점 및 애로사항

◦ LH공사는 ‘10년 재정악화 이후 재정 건정성 회복으로 신규사업 모색중 ⇒ 국가식품클러스터 배후도시는 사업성 확보가 어렵다는 의견

▸ 우리시는 사업성 확보가 가능한 사업과 연계하여 배후도시를 단계적으로 개발하는 방안을 검토 중

▸ 이주단지(공동주택 752세대 2,200명) 입주 가능 (실시설계 및 사업승인 : ‘16. 6.)

□ 추 진 계 획

◦ 배후복합도시 건설사업 사업시행자 선정을 위한 관계기관 참여 유도

▸ LH공사, 전북개발공사 및 한국농어촌공사 등에 개발 위․수탁 협의

◦ 사업시행자 선정 후 추진방안 수립(조성 가능한 면적 등)

□ 기 대 효 과

◦ 친환경 문화·관광·레저기능이 융·복합된 고품격 배후도시 건설로 안정된 정주 공간 제공 및 기업 투자유치 유도

5		국가식품클러스터 투자유치 및 교류협력

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 2016. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 6,000백만원(국비 3,000, 도비 900, 시비 2,100)

◦ 사업내용

▸ 국내‧외 투자유치 및 홍보, 지원센터 운영

▸ 국내‧외 투자유치관 운영 및 투자유치 지원홍보

▸ 투자유치 네트워크 활동 및 국제식품클러스터포럼 개최

▸ 국제식품공동R&D지원사업, R&D네트워크 구축 및 임시연구소 운영

□ 추 진 계 획

◦ 국내‧외 식품기업 방문 및 연구소 방문을 통한 투자유치 활동

◦ 잠재투자자 발굴을 위한 식품 CEO 대상 투자설명회 개최  : ‘16.  1. ~ 12.

◦ 네트워크를 보유한 전문기관‧자문관을 활용한 투자유치 활성화

◦ 조성부지 사이트투어를 통한 투자유치 활동         : ‘16.  1. ~ 12.

◦ 국내‧외 주요 식품박람회 참가 및 투자유치관 운영 : ‘16.  5. ~ 11.

◦ 기업공동 연구과제 및 국제공동R&D사업 추진      : ‘16.  1. ~ 12.

◦ 제6회 국제식품클러스터 포럼 개최                 : ‘16. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 국내‧외 유수의 식품기업 및 기관‧연구소에 대한 투자유치 강화

◦ 교류협력을 통해 국가식품클러스터를 아시아 식품시장의 허브로 육성

6		국가식품클러스터 외국인투자지역 지정‧운영

□ 사 업 개 요

◦ 명    칭 : 국가식품클러스터 식품산업단지 외국인투자지역(단지형)

◦ 사업기간 : 2016 ~ 2017년

◦ 위    치 : 국가식품클러스터 산업단지 내

◦ 사 업 비 : 17,947백만원(국비 10,768, 도비 2,154, 시비 5,025)

◦ 규    모 : 116,000㎡(35천평)  * 추후 입주수요 등을 고려하여 확장 계획

◦ 운    영 : 산업부, 전라북도 및 익산시가 부지 공동매입하여 외국기업에 임대

※ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2016	2017	비고
계	17,947	10,567	7,380	100%
국 비	10,768	6,258	4,510	60%
도 비	2,154	1,293	861	12%
시 비	5,025	3,016	2,009	28%

* ‘16년 시비 확보액 : 1,628백만원 (미확보 1,388백만원 1회 추경 확보)

□ 추 진 계 획

◦ 외국인투자지역 관리기본계획 승인‧고시(산업부)        : ‘16.  1. ~

◦ 외국인투자지역 용지매매 계약금 및 잔금 납부	: ‘16.  2. ~

◦ 입주기업 계약 체결                                  : ‘16.  7. ~

◦ 외국인 투자기업 입주 및 공장가동                     : ‘16. 12. ~

□ 기 대 효 과

◦ 해외 식품기업 생산환경 조성 및 투자기반 마련으로 외국인 투자유치 촉진 및 글로벌 식품산업단지로의 도약

◦ 글로벌 식품기업 및 연구소의 투자유치 활성화 촉진 기여