2016. 1

제191회 익산시의회(임시회)

2016 주요업무계획

	상하수도사업단

순   서

□	일반현황	………	1
□	상수도과	………	3
□	하수도과	………	21

일   반   현   황

□ 기구 및 정․현원

◦ 기    구  …………………………………………………    2과 11담당

														상하수도사업단
				상수도과																					하수도과
상수행정			정수생산			급수시설				요금					누수방지			수질실험				하수행정				하수시설					하수운영			생 활 하 수				하수관리

◦ 정․현  원

(정원/현원)

구 분	정원	현원	증감	직 급 별
				4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구
계	74	72		1 1	2 2	16 18	19 31	17 12	17 6	2 2
상수도과	45	43	△2	1 1	1 1	8 7	13 22	11 7	9 3	2 2
하수도과	29	29			1 1	8 11	6 9	6 5	8 3

□ 부서별 주요업무

부 서	주 요 업 무
상수도과	∙ 상수도 종합계획수립, 상수도특별회계 현금출납 및 금고감독 ∙ 예산편성 및 결산, 계약, 공유재산관리 ∙ 상수도 사용료 조정, 계량기 교체 ∙ 수도정비기본계획수립, 급․배수공사 설계 및 감독 ∙ 간이 상수도 및 소규모 급수시설관리, 개인 급수공사 ∙ 누수방지 및 누수탐사 기획, 노후관 개량공사 및 감독 ∙ 정수생산, 정수시설물관리, 읍․면배수지 관리 ∙ 상수도 수질실험, 상수원 수질검사 ∙ 정수약품 관리, 상수원 보호구역 관리
하수도과	∙하수도 종합계획 수립, 하수도 특별회계 현금출납 및 금고감독 ∙계약, 하수도사용료 및 원인자부담금 부과징수 ∙하수관거임대형민간투자사업, 하수관거정비재정사업 ∙유천생태습지조성 및 생태하천복원사업 ∙공공하수처리시설 설치․개선․운영관리, 하수슬러지처리시설 설치사업 ∙소규모공공하수처리시설 운영,관리 ∙개인하수처리시설설치신고․준공․지도점검 ∙분뇨수집 운반업 허가 및 지도점검 ∙시내일원 긴급하수도공사, 생활민원처리 ∙하수도기계준설 및 맨홀정비

상수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2015 주요성과
□	2016 주요업무계획

비전 및 중점추진방향

	비 젼
안전하고 깨끗한 수돗물의 안정적 공급

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	보다 안전한 깨끗한 생활용수 공급 방안 강구 자체 수돗물 목표 수질기준 설정운영 유수율 향상을 통한 공기업 경영 효율성 제고

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	정수시설 효율적 운영관리 및 상수원 수질관리 강화 상수관망 최적 관리 시스템 구축 수돗물 수질검사 등 시민참여 프로그램 운영

일   반   현   황

□ 기     구

											상수도과
상 수 행 정				정 수 생 산						급 수 시 설					요 금				누 수 방 지						수 질 실 험

□ 정․현 원

(단위 : 명)

구 분	계	직 급 별							비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구
정 원	45	1	1	8	13	11	9	2
현 원	43	1	1	7	22	7	3	2
증 감	△2			△1	9	△4	△6

□ 사  무  분  장

◦	상수행정	:	상수도종합계획수립, 예산편성 및 결산, 입찰 및 계약, 공유재산관리
◦	정수생산	:	정수생산기획조정, 정수장시설물관리, 배수지관리
◦	급수시설	:	상수도정비기본계획수립, 급․배수공사설계 및 감독, 공동주택저수조 청소, 간이상수도 및 소규모급수시설관리, 개인급수공사
◦	요 금	:	급수사용료조정, 수입예산정리 및 정산, 계량기교체, 체납요금징수
◦	누수방지	:	누수방지 및 누수탐사기획, 노후관개량공사 및 감독, 누수탐사, 누수처보수, 상수도관망도 정리, 변류수리 및 교체
◦	수질실험	:	수도수질실험 기획, 상수원수질검사, 정수약품 구입관리, 상수원 보호구역관리, 수도꼭지 수질검사

□ 수돗물평가위원회 현황

(단위 : 명)

구 성	위 원				임 기	비 고
	공무원	시의원	교수	시민단체
10	2	1	2	5	2 년	남 6, 여 4

※ 근 거 : 수도법 제30조의1,  익산시 상수도급수조례 제48조

□ 상수도 급수인구 현황

(단위 : 명)

구 분	총인구	급수인구	보급율 (%)	비 고
계	304,463	301,171	98.9
도심권	237,960	237,832	99.9
읍면권	66,393	63,339	95.4

□ 상수도 급수시설 현황

(단위 : ㎥/일)

구 분		시설용량	급 수 량	비 고
계		230,300	147,311
생 활 용 수	소 계	195,300	124,670	100%
	광 역	105,300	53,653	43%
	자 체	90,000	71,017	57%
공 업 용 수	자 체	35,000	22,641

□ 상수도 사용 현황

(단위 : 전, ㎥)

구 분 업 종	급수전수	월평균 사용량	비율(%)	비 고
계	60,096	3,442,808	100
가 정 용	46,594	1,634,500	47.5
일 반 용	12,760	599,000	17.4
산 업 용	612	320,743	9.3
대중탕용	31	6,700	0.2
전용공업용	99	881,865	25.6

□ 상수도 관로 현황

(단위 : ㎞)

계	도수관	송수관	배수관	급수관	비고
1,865.2	2.5	25.3	1,166.7	670.7

□ 상수도 시설 현황

시 설 명	개 소	시설용량	비 고
정 수 장	2	125,000㎥/일	신흥, 금강
배 수 지	5	47,500㎥	신흥, 금강, 금마, 팔봉, 삼기
가 압 장	2	48,600㎥/일	금마, 삼기
보조수원지	1	1,053,000㎥	신흥

2015 주 요 성 과

□  고액 체납 상수도 요금 징수

○ (주)넥솔론 체납액 : 2014. 8～9월 상하수도 사용료 (금186,455천원)

○ (주)넥솔론 체납액 징수내역

▸ 출자전환주식양수(2015.10.02) : 111,873천원

▸ 향후 현금변제액 : 74,582천원(2021∼2024년 분할 상환)

※ 출자전환주식 전량매도(2015.12..09) : 159,812천원(차익 47,939천원)

□ 유수율 제고사업 추진 경영개선 기반 조성

○ 읍면지역 상수관망 블록구축 : 4개블록(춘포 외 2개면 지역)

○ 상수도 노후관 교체/소규모 누수처 복구 : 15개소 7.5km/962개소

○ 관내 변류정비 및 교체 179개소

□  효율적 검침 및 부과․징수로 경영 효율화 제고

○ 정확한 검침으로 투명한 부과체계 확립 : 검침원 교육 12회

○ 상수도 체납요금 징수반 편성운영으로 징수율 제고 : 징수율 99.02%

□ 상수도 시설개선 등을 통한 안정적 급수체계 구축

○ 급수구역 확장공사 추진  : 2개소 1.5km

○ 급수관 통합공사/배수관 개선공사 추진 : 4개소 2.5km/2개소 1.2km

□ 상수도 생활민원 적극해소로 시민불편 최소화

○ 계량기 동파방지 보온재 설치 : 거동 불편자, 독거노인세대 등 384개소

□ 상수도과 전직원 8개반 24명으로 편성 직접 방문 설치

○ 급수장치 수선 공사       : 3,509건

○ 공공 상수관로 누수탐사/수용가 옥내누수 탐사 : 95건/1,240건

○ 상수관 부설도로 노면정비 : 73개소 16km

2 0 16  주 요 업 무 계 획

		익산시 상수관망 최적화사업
		유수율 증대를 위한 누수방지사업
		급배수구역확장 및 급배수관 민원공사
		안전하고 깨끗한 수돗물 공급
		상수도요금 고액체납자 행정조치강화
		국가식품클러스터 배수지 건설사업

1		익 산 시 상 수 관 망 최 적 화

□ 필  요  성

◦ 상수도관망 블록시스템, 유지관리시스템 구축 계획 및 노후상수도관 정비 계획 수립

◦ 노후상수도 시설물의 효율적인 정비로 생산원가 절감 및 유수율 제고

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 비 : 27,000백만원(용역비 1,082, 공사비 25,918)

◦ 사 업 기 간 : 2014 ~ 2020( 7개년 )

◦ 연도별 투자 계획                                (단위 : 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017	2018	2019이후
합 계	27,000	1,000	82	-	5,000	5,000	15,918
용 역 비	1,082	1,000	82	-	-	-	-
공 사 비	25,918	-	-	-	5,000	5,000	15,918

◦ 주요 사업내용

▸상수도관망 최적화 및 기술진단 용역 시행(1,082백만원) : ‘15. 06〜 ’16. 11

▸상수도관망 블록구축 : 블록별 유량계 및 감압, 가압시설 설치 등

▸노후관 교체 및 관로 정비   : 누수방지 및 급수시설 개선 등

▸급수상황 관제 시스템 구축 : 급수상황 실시간 감시로 유수율 제고

□ 추 진 계 획

◦ 용역추진 상황 감독 및 중간 점검 ---------- 2016. 1. ~ 2016. 2.

◦ 관망 최적화 블록시스템 구축 현황조사 ------- 2016. 1. ~ 2016. 5.

(구역고립계획, 관로확인, 밸브류 조사 및 탐사, 수압측정 조사)

◦ 상수도관망 현황조사 및 기술진단 ------------ 2016. 1. ~ 2016. 9.

(관망일반현황, 누수처복구 처리 등)

◦ 상수도관망 최적화 실시설계 및 관망 기술진단 최종 결과 보고 - 2016. 11.

2		유수율 증대를 위한 누수방지 사업

□ 필  요  성

◦ 노후 상수도관 교체 및 시설물 정비 등을 통한 누수 및 수질오염 예방

◦ 수돗물 자원낭비 예방으로 수익증대를 통한 경영 효율화 기여

□ 사 업 개 요

◦유수율 제고사업

단 위 사 업 명	위 치	사 업 량	사업비 (백만원)	비 고
합 계			3,200
노후관 교체공사	주현동 명성당한의원 외 5개소	6.4km	1,600
부식방지 전기공사	춘포면 오산리 원석암마을 ~ 팔봉배수지	4km	200
긴급 누수처 복구	관내 일원	1,200개소	1,200
변류 정비공사	〃	200개소	200

□ 추 진 계 획

◦ 노후관 교체 공사 (6개 사업, L=6.4km) ---------- 2016. 01. ~ 10.

◦ 상수도강관부식방지 전기공사 -------------------- 2016. 01. ~ 10.

◦ 긴급 누수처 복구 공사

▸상수도관 노후로 인한 누수발생시 긴급복구--------- 발생시, 연중시행

◦ 변류 정비공사

▸노후 및 불량 변류(제수변, 소화전, 공기변 등)의 교체---- 연중시행

3		급수구역 확장 및 급·배수관 민원공사

□ 필  요  성

◦ 장래 급수량 증가에 따른 관로 확장 및 지하수 오염 우려지역 수돗물 공급을 위한 배수관 설치

◦ 수압이 낮은 민원에 대해 급·배수관 확장 및 통합으로 시민불편 해소

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2016. 12.

◦ 사업내용

구 분	위치	사업량	사업비 (백만원)	비고
합 계			2,440
급수구역 확장공사	석불사거리~낭산사거리간	2.0km	1,000
	낭산면 구북마을	0.5km	40
상수도 부설도로 노면정비공사	익산시 일원	8.0km	500
급·배수관 민원공사	익산시 일원	10.0km	900

※ 마을 외곽지역 급수 대상지 파악(10개 읍·면 10㎞, 소요사업비 800백만원)

□ 추 진 계 획

◦ 급수구역 확장 및 상수도 부설도로 노면정비 공사

▸ 현지조사 및 설계 ---------------------------- 2016. 01 ~ 03

▸ 공  사  기  간  ----------------------------  2016. 04 ~ 10

◦ 급·배수관 민원공사

▸ 수압저조로 인한 급수불출 민원 발생시 -------------- 연중시행

4		안전하고 깨끗한 수돗물 공급

□ 필  요  성

◦ 수돗물 검사 등 시민참여를 통한 수돗물에 대한 신뢰도 향상

◦ 원·정수 수질관리 강화 안전하고 깨끗한 수돗물 안정적 공급

□ 현      황

구 분	시설용량 (㎥/일)	급 수 량 (㎥/일)	비 율 (%)
소 계	249,000	124,670	100
자체정수	90,000	71,017	57
광역상수도	159,000	53,653	43

□ 추 진 계 획

◦ 정수시설 안정적 운영관리 : 사전 점검 강화 및 효율적 시설 관리

▸ 배수지(5개소 16지), 침전지(2개소 8지) 청소 ----------- 연  중

▸ 공업용수 노후 제어반 교체공사 ----------------  2016. 01 ~ 02

▸ 정수장 침전지 응집기 보수공사 ----------------  2016. 03 ~ 04

▸ 신흥배수지 5호지 내부벽 보수공사 -------------  2016. 03 ~ 06

▸ 정수장 및 가압장 시설물 도색공사 -------------  2016. 04 ~ 06

▸ 신흥공업용수 처리시설 정밀점검 용역 ----------  2016. 04 ~ 06

◦ 수돗물 수질검사 강화

▸원수 수질검사강화

법정검사 (32개 항목)	수질검사 강화(36개 항목)
․월간 : pH 등 6개 항목 ․분기 : 질산성질소 등 26개 항목	․일 일 : pH 등 5개 항목 ․주 2회 : 대장균군 등 5개 항목 ․분 기 : 질산성질소 등 26개 항목

법 정 검 사	수질검사 강화
․ 일일 : pH 등 6개 항목 ․ 주간 : 일반세균등 7개 항목 ․ 월간 : 수은 등 58개 항목	․ 일일 : pH 등 6개 항목 - 2회 ․ 주간 : 일반세균 등 7개 항목 - 2회 ․ 월간 : 수은 등 58개 항목 – 1회 ․ 분기 : 염화비닐 등 82개 항목 - 1회

▸정수 수질검사강화

◦ 수돗물 신뢰제고 신흥정수장 개방  : 시민, 단체, 학교, 어린이집 등

◦ 수돗물 안전홍보 품질보고서 배부  : 50,000부

◦ 상․하반기 민관합동 수질검사(년2회)

◦ 수돗물평가위원회 실시(년2회)

5		상수도 요금 고액체납자 행정조치 강화

□ 필  요  성

◦ 상수도 사용료 고액 및 상습체납자에 대한 재산압류, 단수 등 행정        조치를 강화하여 체납요금 징수로 공기업 재정운영 원활화 도모

□ 사 업 개 요

◦ 수전현황

합 계	가정용	일반용	대중탕용	산업용	전용공업용
60,074	46,629	12,715	31	599	100

◦  2016년 상수도요금 부과․징수

□ 2016년 요금부과 및 징수 목표액  : 27,659백만원/27,272백만원( 98.6%)

□ 과년도 체납액 징수목표  : 632백만원 / 190백만원(30.0%)

□ 과년도 압류내역

재 산 압 류	징 수	체 납
97건/161,333천원	62건/87,779천원	35건/73,553천원

□ 추 진 계 획

◦ 상수도 체납요금 징수반 편성운영 --------------------  연  중

◦ 수도계량기 조사원(50명)담당구역 수도요금 징수 책임제 시행

□ 2회 체납 수용가 체납수도요금 안내 및 수도공급정지(단수)예고문 스티커 부착

□ 체납 수용가 단수 (단수시행 전 3회 이상 방문 및  전화 납부 촉구)

◦ 상수도 사용료 상습 체납자 행정 조치 강화

□ 상습체납자에 대한 강력한 행정처분 이행 : 토지 및 건물 등 재산압류

□ 50만원 이상 체납자 재산조회 및 압류조치 : 수시

※ 기초생활수급자 등 사회적 약자에 대한 단수유예 및 납부독려(시민불편 최소화)

6		국가식품클러스터 배수지 건설사업

□ 필  요  성

◦ 국가식품클러스터 산업단지 내 용수수요에 대처하고 안정적인 용수공급 및 효율적인 수도시설 운영에 필요한 배수시설 구축

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 명  : 국가식품클러스터 배수지 건설공사

◦ 사업개요  : Q=8.8천㎥/일

◦ 사업기간  : 착공일로부터 12개월

◦ 총사업비  : 8,416,869천원(도비 700,000   시비 7,716,869)

‣용역비 및 보상비 : 899,614, 공사비 7,517,255(‘15년 1,400,000  ’16년 6,117,255)

◦ 사업내용  : 배수지 건설공사 1식, 배수관로 D=500~600㎜, L=1.5km,  송수관로 D=600㎜, L=0.15km, 진입도로 B=4~6m, L=510m

□ 추 진 계 획

◦ 실시계획 인가	: ‘16. 01월

◦ 토지보상 29필	: ‘16. 01월

◦ 왕궁배수지 건설공사 착공	: ‘16. 03월

◦ 왕궁배수지 건설공사 준공	: ‘16. 12월

□ 기 대 효 과

◦ 국가식품클러스터 산업단지 입주업체 및 연구소에 안정적인으로 맑고 깨끗한 물공급

하수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2015 주요성과
□	2016 주 요 업 무 계 획

비전 및 중점추진방향

	비 전
완벽한 하수처리로 시민이 쾌적한 도시환경 조성

		전 략 목 표
◦ ◦	하수처리 운영 효율 증대로 쾌적한 주거환경 제공 수질개선을 통한 악취없는 청정녹색도시로 시민만족 행정 구현

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	정화된 하수를 이용한 방류수 재이용 및 생태습지공원 조성 하수관거사업 추진으로 방류지역의 수질보전 효율적인 하수종말처리장 운영으로 예산절감 및 수질보전

일   반   현   황

□ 기          구

					하수도과
하수행정			하수시설			하수운영			생활하수			하수관리

□ 정  ․  현  원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별								비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능	계약
정 원	29		1	8	6	6	8	-	-
현 원	29		1	11	9	5	3	-	-	육아휴직 1명 (16.6.30.까지)
증 감	-		-	3	3	▵1	▵5

□ 사  무  분  장

◦	하수행정 :	하수행정종합계획수립조정, 하수도특별회계 현금출납 및 금고감독, 입찰 및 계약, 하수도사용료․원인자부담금 부과징수, 공기업평가 결산
◦	하수시설 :	하수정비기본계획 수립, 하수관거임대형민간투자사업(BTL),하수관거정비사업, 유천생태습지 및 생태하천 복원사업, 북부하수처리장주민숙원사업
◦	하수운영 :	천서․왕궁지구 하수관거 정비사업, 화정지구 소규모마을하수처리장 설치사업, 공공하수처리시설 설치․개선․운영관리, 3산단 폐수종말처리시설 운영관리
◦	생활하수 :	개인하수처리시설 설치신고․준공․지도점검, 분뇨수집․운반업 허가 및 지도점검, 지하수개발이용 허가․신고․준공, 공중화장실, 배수설비협의
◦	하수관리 :	시내일원하수도공사, 하수생활민원처리, 주민숙원사업, 맨홀정비, 준설원관리, 온천지구 지정 및 관리

2015 주 요 성 과

□ 오․우수관 분리로 하수처리시설 효율개선

◦ 함열․춘포처리구역 하수관거 정비사업 추진

▸관거정비 33.9km,  배수설비 878개소

◦ 천서왕궁지구 하수관거 정비사업 추진

▸관거정비 23.1km, 배수설비 427개소

◦ 화정지구 소규모마을하수처리장 설치사업 추진

▸관거정비 8km

□ 공공하수처리장 최적운영을 통한 수질환경개선

◦ 2014년도 공공하수도 운영․관리 실태점검 결과 발전상 수상(포상금 1000만원)

◦ 총27개소(139,521㎥/일) 하수처리시설의 정상가동 및 유지관리

◦ 하수처리시설 적정운영 관리를 통한 처리효율 향상 및 수질오염 저감

□ 유천 생태습지 및 생태하천 복원사업으로 친수문화공간 조성 완료

◦ 생태습지 산책로(2.7㎞) 포장 및 목교 설치, 수목 식재 등

◦ 하천 돌쌓기(0.9㎞) 및 식생매트 설치, 제방도로 포장

□ 읍․면․동 소규모 하수도 시설공사 및 생활민원 신속처리

◦ 하수도 정비 10㎞, 하수도기계준설 1,895㎥

◦ 365일 누수 없는 비상대기 근무로 2,244건의 하수생활민원 처리

◦ 원활한 하수배제를 위한 맨홀 및 하수도 준설 1,487건, 파손 하수관로 복구 및 맨홀 단차조정 757건 실시

2016 주요업무계획

		하수도 사용료 인상 추진 하수슬러지 처리사업 추진 소규모 공공하수처리시설 관리대행 추진 오산 문화마을 하수관거 정비사업 유천 생태습지 유지관리 읍․면․동지역 하수도 시설 및 준설공사 지하수 이용부담금 부과․징수

1		하수도사용료 인상 추진

□ 추 진 배 경

◦ 전국 지방공기업 평균대비 낮은 하수도사용료 현실화율로 매년 누적적자 가속(전국평균 25.8%, 익산시 21.64% / 2014년 기준)

◦ 정부(행정자치부) 정책방향 : 2017년까지 현실화율 60%이상 권고

◦ 2015. 3월 인상 이후 추가인상이 없을 경우 2020년 현실화율 17.44%로 예상

□ 추 진 현 황

◦ 하수도특별회계 중장기 경영관리계획 수립 용역      : 2015. 5. 21. ~ 9. 5.

◦ 용역결과에 따른 하수도사용료 인상 추진 계획 수립   : 2015. 11.

◦ 익산시 지방물가대책위원회 개최                  : 2015. 12. 16.

◦『익산시 하수도운영관리에 관한 조례』입법예고    : 2015. 12. ~ 2016. 1.

◦ 조례규칙심의회 심의                             : 2016. 1. 14.

□ 인 상 방 안

◦ 『익산시 하수도 운영관리에 관한 조례』제14조 하수도 사용료 산정기준 개정

▸2016년 4월부터 2020년까지 5년간 전년대비 매년 25%씩(평균 180원) 인상

◦ 하수도 사용량의 단계별 누진요금 격차 확대(최대 164%⇒최대 200%)

◦ 하수도 사용료 인상 후 결과 예상

(단위 : 억원, %)

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
사용료수익	115	178	222	279	349	436
현실화율	23.98	32.50	37.85	44.46	52.14	61.14

□ 추 진 계 획

◦『익산시 하수도운영관리에 관한 조례』개정안 의회제출   : 2016. 1.

◦ 하수도 사용료 인상                                    : 2016. 4.

공공하수도 사용료 산정기준(안)

( 단위 : 원 ) ※ ( ) 인상요금

구분 업종	단계별수량 (㎡/월)	2015. 3. (현행)	2016. 4	2017. 1.	2018. 1.	2019. 1.	2020. 1.
가정용	1 ~ 10	280	350 (70)	440 (90)	550 (110)	690 (140)	860 (170)
	11 ~ 30	360	530	660	830	1,030	1,290
	31 이상	460	700	880	1,100	1,380	1,730
일반용	1 ~ 50	730	910 (180)	1,140 (230)	1,430 (290)	1,790 (360)	2,240 (450)
	51 ~ 100	790	1,140	1,420	1,780	2,230	2,800
	101 ~ 300	860	1,370	1,710	2,140	2,680	3,360
	301 ~ 1,000	950	1,600	1,990	2,490	3,130	3,920
	1,001이상	1,040	1,830	2,280	2,850	3,580	4,480
대중탕용	1 ~ 300	300	380 (80)	480 (100)	600 (120)	750 (150)	940 (190)
	301 ~ 500	350	490	620	780	980	1,220
	501 ~ 1,000	410	600	760	960	1,200	1,500
	1,001이상	480	750	950	1,200	1,500	1,880
산업용	1 ~ 1,000	320	400 (80)	500 (100)	630 (130)	790 (160)	990 (200)
	1,001이상	360	520	650	810	1,020	1,280
산업단지처리구역	1 ~ 1,000	130	160 (30)	200 (40)	250 (50)	310 (60)	390 (80)
	1,001이상	140	210	260	330	410	500
톤당 평균요금		323	501 (178)	626 (125)	785 (159)	982 (197)	1,227 (245)

2		하수슬러지 처리사업 추진

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 량 : 100㎥/일×1기(건조+에너지회수(소각))

◦ 사 업 비 : 19,800백만원(국비 13,860, 시비 5,940)

▸한국환경공단 지급액 : 13,729백만원(국 9,540, 시 4,189)

▸코오롱환경서비스(주) 지급액 : 2,981백만원(전체공정율 17.3%)

□ 추 진 현 황

◦ 공사계약 해지요청(익산시 ⇒ 한국환경공단)         : 2014. 12. 19.

◦ 도급계약해지 무효확인 등 소송제기(코오롱환경서비스(주))   : 2015. 2. 12.

◦ 변론기일 참석 5회, 조정기일 참석 1회              : 2015. 3. ~ 12.

▸원고측에 799,137,184원 지급(원고 이의신청으로 조정 무산)

◦ 국비 반납에 대하여는 소송결과에 따라 사업 추진계획임을 통보 : 2015. 12. 15.

(익산시 ⇒ 새만금지방환경청)

◦ 무자격사와 계약관련 변호사(정부법무공단 배태근변호사) 추가 선임 : 2015. 12. 17.

◦ 원고측 소송취지변경 및 손해배상청구(2,696,352,554원)   : 2015. 12. 23.

□ 추 진 계 획

◦ 원고측에서 도급계약해지 무효확인 및 손해배상 부분도 추가하여

소송 중으로 우리시가 유리한 논리개발을 통해 적극 대응 계획

◦ 전문가 의견을 수렴하여 사업 추진방향 결정        : 2016. 상반기

▸슬러지 관련 전문가 회의 및 지역주민들과 간담회 등 개최

3		소규모 공공하수처리시설 관리대행 추진

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 명 : 여산 및 소규모 공공하수처리시설 관리대행 추진

◦ 시설위치 : 익산시 여산면 외 9개 면․동 산재

◦ 시설규모

▸소규모 공공하수처리시설 23개소 (처리용량 : 2,391㎥/일)

▸중계펌프장(11개소), 하수관로(19km)

◦ 소요예산 : 직영관리 665,280천원(관리대행 572,288천원)

◦ 관리대행업체 선정 방법

▸제한경쟁입찰 (“공공하수도 관리대행업”을 등록․신고한 업체)

▸근거법령 : 하수도법 제19조의2(공공하수도 관리대행업 등), 제19조의5

◦ 관리대행 기간 : 2016년 ~ 2018년 (3년 단위 계약)

□ 추 진 계 획

◦ 관리대행에 대한 익산시의회 동의                       : 2016. 1.

◦ 추경예산 편성                                         : 2016. 5.

◦ 관리대행업자선정위원회 구성 및 입찰 공고              : 2016. 6.

◦ 관리대행업체 선정                                     : 2016. 7.

□ 기 대 효 과

◦ 소규모 공공하수처리시설에 대한 운영기술이 풍부한 전문 인력 사용으로 시설 고장 시 신속 대응 가능

◦ 공공하수처리시설 운영관리에 민간업체의 선진기술 및 경영기법을 도입하여 하수처리시설 운영의 효율성 제고

□ 소규모 공공하수처리시설 현황

순번	시설명	소 재 지	처리용량 (톤/일)	처 리 공 법	준 공 년 도	유입하천	비 고 (운영)
계	23개소		2,391
1	여 산	여산면 여강로 166-43 (두여리 1446-8)	600	ACS공법	2010. 5.	금강	직 영
2	용 동 신 왕	대조리 1195-1	30	바이오메트공법	(1995.12.1) 2004.9.22	금강
3	왕 궁 상 발	발산리 335-12	70	바이오메트공법	(1997.4.10) 2004.9.22	만경강
4	오 산 문 화	신지리 679-14	100	접촉산화공법	1997.12.31	만경강
5	함 라 신 함	신목리 1364-28	60	회분식활성 슬러지법	1998.12.21	만경강
6	춘 포 판 문	용연리 529-10	80	회분식활성 슬러지법	1998.12.10	만경강
7	춘 포 초 삼	천동리 82-19	50	고효율오수 합병정화조공법	1999.12.24	만경강
8	왕 궁 연 정	동봉리 715-10	39	고효율오수 합병정화조공법	2001.01.17	만경강
9	춘 포 창 평	창평리 852-14	35	BC-MIEDIA 고효율오수처리시설	2001.12.31	만경강
10	춘 포 입 석	쌍정리 328-5	49	분뇨및고농도 유기오폐수처리법	2004.12.31	만경강
11	춘 포 화 평	인수리 429-7	49	바이오퍼펙트법	2004.12.23	만경강
12	춘 포 심 암	신동리 804-6	42	자연친화형 무동력처리공법	2005.6.10	만경강
13	춘 포 시 전	덕실리 13-4	20	혐기간헐포기배양	2006.11.21	만경강
14	춘 포 덕 실	덕실리 37-24	30	생물학적오페수 처리장치(KSBNR)	2007.03.08	만경강
15	춘 포 삼 포	삼포리 856-1	20	A2EBC공법	2007.07.27	만경강
16	동 산 유 천	석탄동 815-1 인근지역	120	바이오퍼펙트법	2005.03.31	만경강
17	웅 포 강 변	웅포리 1091	52	AOSB공법	2007.12.05	금강
18	웅 포 맹 산	맹산리 1031-13	70	한남SM딤체공법	2008.02.10	금강
19	함 라 신 촌	신등리 254-4,6	53	바이오매트공법	2007.12.14	만경강
20	삼 기 간 촌	간촌리 1013-12	160	오폐수처리용 필라이트처리공법	2007.11.13	만경강
21	삼 기 대 제	용연리 1341-1	52	자연통풍형 호기조/습지조로 구성	2009. 8	만경강
22	오 산 지 구	오산리 169-2	490	FNR공법	2011.12.19	만경강
23	망 성 화 정	내촌리 1271-6	120	현수 다단계 고도처리공법	공사중	금강

4		오산 문화마을 하수관거 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 오산면 신지리 광지, 옥포, 신석, 북신석마을

◦ 규    모 : 오수관로 8.6km , 배수설비 98가구

◦ 사업기간 : 2016년 ~ 2017년(2년간)

◦ 사 업 비 : 4,372백만원(국비 3,060/도비 131/시비 1,181)

▸2016년 : 714백만원(국비 500/도비 21/시비 193)

□ 추 진 계 획

◦ 추경성립 전 사용승인                        : 2016. 1.

◦ 실시설계용역                                : 2016. 2. ~ 6.

◦ 행정절차이행(재원협의, 원가심사 등)          : 2016. 7. ~ 10.

◦ 공사 착공 및 준공                           : 2016. 11. ~ 2017. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 공공하수처리구역 확대로 수질오염을 저감하여 맑은 물 보전에 기여

◦ 농촌마을 하수도 보급 증대에 따른 주거환경 개선

5		유천 생태습지 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 금강동 993-1번지 일원

◦ 규    모 : 생태습지 유지관리 A=134,521㎡

▸ 잔디 및 풀깍기(55,330㎡), 수목(교목 1,503주, 관목 44,200주), 정자 2개, 퍼걸로 8개, 바닥분수 1개, 등의자 36개, 평의자 30개 및 수질 관리 등

◦ 사업기간 : 연 중

◦ 사 업 비 : 200백만원

□ 추 진 계 획

◦ 행정절차이행                             : 2015. 12. ~ 2016. 2.

▸설계 및 원가심사 등

◦ 주민편익시설 보강 설치                   : 2016. 2. ~ 5.

▸화장실, 운동기구, 수목 식재, 조명 추가 설치 등

◦ 유지관리 추진                            : 연중

□ 기 대 효 과

◦ 유천 생태습지 완공에 따른 습지 내 수목 및 전문적인 수질 관리에 기여

◦ 시민에게 쾌적한 친수공간과 편안한 휴식공간을 제공하여 주민 편익 증진

◦ 지속적인 유지 관리를 통해 어린이들을 위한 생태 체험 학습장으로 활용

6		읍․면․동지역 하수도 시설 및 준설공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원

◦ 총사업비 : 1,819백만원(국비 400/시비 1,419)

▸노후하수관거 보수보강사업 : 암거 보강 L=100m, 암거 보수 A=442㎡

▸하수도 시설공사 유지보수  : 정비 3.5km

▸시내일원 맨홀뚜껑교체공사 : 250개소

▸하수도기계준설            : 1,800㎥

▸생활환경개선사업          : 17개소

▸읍면동 주민숙원사업 등    : 7개소

◦ 사업기간 : 2016. 1 ~ 11.

□ 추 진 계 획

◦ 사업대상지 현장조사 및 설계                      : 2016. 1. ~ 10.

◦ 공사 발주 및 사업 추진                           : 2016. 3. ~ 11.

□ 기 대 효 과

◦ 노후하수관로 침하 및 파손 구간을 정비하여 싱크홀 등을 사전예방

◦ 우기철 침수피해 예상지역 및 미설치 지역의 정비로 쾌적한 주거환경 도모

◦ 기계준설 실시로 하수관 막힘(역류) 및 악취 등 주민 생활의 불편 해소

7		지하수 이용부담금 부과․징수

□ 사 업 개 요

◦ 부과일정 : 2016. 7월부터

◦ 부과대상 : 지하수개발‧이용자 700여공 정도(생활용, 공업용)

▸부과제외 : 학교, 농업용, 가정용, 사회복지시설, 긴급‧비상급수시설

◦ 부과금액 : 85원/톤(한강수계 물이용부담금의 50%)

▸관련법 : 지하수법 제30조의3, 익산시 지하수관리조례 제17조

◦ 2016년 예상세입 : 10억원

□ 추 진 계 획

◦ 부과대상선정 및 지하수시설 현장 확인            : 2016. 1. ~ 2.

◦ 지하수이용부담금 부과‧징수에 따른 홍보           : 2016. 1. ~ 6.

◦ 부과프로그램 및 적산유량계 구입                 : 2016. 2.

◦ 부과대상 지하수 시설에 유량계 설치              : 2016. 4.

◦ 지하수이용부담금 부과‧징수                       : 2016. 7.

□ 기 대 효 과

◦ 지하수의 무분별한 개발‧이용을 방지하여 환경오염방지에 기여

◦ 지하수 이용부담금 부과․징수로 지하수 보전․관리에 필요한 재원마련