2016.  7.

제196회 익산시의회(1차 정례회)

2016행정사무감사자료

	문화산업국

역사문화재과

	□		감사자료 과 공통사항
		1.			2015 업무성과 및 반성	………	151
		2.			2015 예산집행 및 추진사항	………	152
		3.			2015 행정사무감사 지적사항 조치결과	………	154
		4.			2015 상급기관 감사 지적사항 및 조치결과	………	156
		5.			시정질문 조치 결과	………	156
		6.			주요사업 조서(3천만원 이상)	………	157
		7.			2015 각종 민원 접수 처리내역	………	160
		8.			기금 운용 관련사항	………	161
		9.			위원회(자문위원회 포함) 운영 관련	………	161
		10.			용역사업 관련	………	163
		11.			인․허가 민원처리 관련사항	………	164
		12.			각종공사 설계 변경 상황	………	165
		13.			건설공사 집행 현황(3천만원이상)	………	167
		14.			민간에 대한 보조금 집행 내역	………	168
		15.			국․도비 보조사업 집행현황(1억원이상)	………	169
		16.			명시 및 사고이월 사업비 집행내역	………	170
		17.			2016년도 명시이월 내역	………	171
		18.			예산전용 사항 및 예비비 집행현황	………	173
		19.			공사 준공기한 연장내역	………	173
		20.			국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황	………	173
		21.			국․도비 반납현황 및 사유	………	174
		22.			2015 계획사업 중 미착공사업 현황	………	175
		23.			2015 계획사업 중 유보 및 취소 사업현황	………	175
		24.			2015년도 이월사업 중 유보 및 취소 사업현황	………	175
		25.			2015년도 예산편성 후 전액 미집행 내역	………	175
		26.			소송사건 현황	………	175
		27.			시홈페이지 접수 민원처리 실태현황	………	176

	□		감사자료 과 요구사항
				1.	백제역사유적지구 세계유산 등재 추진실적 ………	179
				2.	고도육성 기반구축사업 추진실적 …………………	180
				3.	옥룡천 옛물길 회복사업 추진실적 ………………	181
				4.	이주단지 조성사업 추진실적 ………………………	182
				5.	문화유산 보존정비 현황 ……………………………	183
				6.	익산 중요무형문화재 통합전수관 건립 추진실적 …	185

감사자료 과 공통사항

1. 2015 업무성과

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		정창우	□
		고도육성계장		유원향	□
		문화재시설계장		배 석 희	□
		세계유산계장		김민규	□

□ 성      과

◦ 백제역사유적지구 유네스코 세계유산 등재

▸제39차 세계유산위원회 / 독일 본 (7. 8.)

▸세계문화유산 도시협의회 가입 (13개 시군구)

▸세계유산 등재 선포식 (9. 22.)

◦ 익산 역사문화도시 추진

▸익산 역사문화도시 및 창조도시 조성 연구용역 수행(‘15. 7.~‘16. 7.)

▸익산 역사문화콘텐츠 개발 연구용역 수행(‘15. 8. ~‘16. 4.)

◦ 고도보존육성사업 추진

▸옥룡천 옛물길 회복사업 토지 및 건물 협의 매입 (63.6%)

- 토지 58필지(10,019㎡), 건물 25동 중 24필지(6,375㎡), 건물 9동

▸이주단지 문화재 발굴조사 완료, 토지 및 건물 협의 매입 (88.9%)

- 토지 37필지(21,251㎡), 건물 10동 중 29.5필지(18,898㎡), 건물 7동

▸고도보존육성 관리지침 수립 및 공포 (4. 30.)

◦ 문화재 보존정비 추진

▸왕궁리유적, 제석사지 등 문화재 보존정비 18건

- 국가지정 문화재 7건 / 도지정 문화재 8건 / 기타[전통사찰] 3건

▸나바위성당 종합정비계획 수립 (8. 20.)

▸무형문화재 보존․전승 지원

◦ 익산 중요무형문화재 통합전수관 건립

▸골조공사 완료 및 내․외부 마감공사 추진 (2015년말 공정률 70%)

2. 2015예산집행 및 추진사항

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		정창우	□

【 2015. 12. 31현재 】                                          (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율	비 고
역사문화재과				23,609,325	11,102,854	12,506,471	47.0	이월액 12,373,359 - 명시이월 6,272,863 - 사고이월 1,640,265 - 계속비이월 4,460,231
	전통문화 보존 및 전승			23,340,347	10,833,885	12,506,462	46.4
		유형문화재 보존		5,625,840	4,205,539	1,420,301	74.8
			문화재 보수 정비	103,893	98,273	5,620	94.6
			왕궁리 유적 정비	1,683,881	948,102	735,779	56.3	계속비이월 735,779
			제석사지 정비	647,032	349,910	297,122	54.1	계속비이월 297,122
			문화재 운영	37,890	37,020	870	97.7
			도지정 문화재 보수정비	813,819	671,064	142,755	82.5	명시이월 95,230 사고이월 33,650
			국가지정 문화재 보수정비	496,644	409,698	86,946	82.5	명시이월 67,528
			익산역사유적지구 세계문화유산 등재 추진	146,075	146,007	68	99.9
			중요목조문화재 감시인력 배치	87,636	79,136	8,500	90.3
			문화재 재난방지 시스템 구축	364,270	324,355	39,915	89.0
			익산시민 백제문화 유산지킴이 사업추진	5,000	5,000	0	100.0
			문화재 긴급보수사업	30,000	27,786	2,214	92.6
			세계유산 보존 관리체계 구축사업	163,000	163,000	0	100.0
			세계유산 통합사무국 설치 운영	266,700	266,700	0	100.0
			전통사찰보존사업	180,000	176,522	3,478	98.1
			문화재 활용 생생사업	50,000	50,000	0	100.0

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비 고
			미륵사지 유구정비	450,000	450,000	0	100.0
			세계유산 보존관리 및 활용	100,000	2,966	97,034	3.0	명시이월 97,034
		무형문화재 보존 및 전승		2,865,663	2,295,333	570,330	80.1
			기예능 보유자 전수지원	153,000	153,000	0	100.0
			무형문화재 전수활동비	64,700	64,700	0	100.0
			무형문화재 전수관 건립	2,626,963	2,056,633	570,330	78.3	계속비이월 570,330
			기예능 보유자 전수지원(보조)	21,000	21,000	0	100.0
		유적정비		14,848,844	4,333,013	10,515,831	29.2
			고도보존 정비	424,000	25,364	398,636	6.0	명시이월 398,636
			향토유적 정비	5,030	3,767	1,263	74.9
			익산고도육성사업 (보조)	11,409,559	4,224,557	7,185,002	37.0	명시이월 5,543,935 사고이월 1,606,615
			익산고도육성사업	9,635	6,905	2,730	71.7
			역사문화도시 조성	143,620	72,420	71,200	50.4	명시이월 70,500
			고도 이미지 찾기사업	2,857,000	0	2,857,000	0.0	계속비이월 2,857,000
	재무활동			250,434	250,425	9	99.9
		보전지출		250,434	250,425	9	99.9
	행정운영경비			18,544	18,544	0	100.0
		기본경비		18,544	18,544	0	100.0

3. 2015행정사무감사 지적사항 조치 결과

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		정창우	□
		고도육성계장		유원향	□
		문화재시설계장		배 석 희	□

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과	비고
1	• 무왕관련 생활유적 관리 철저 ▸무왕관련 생활유적(서동생가, 용샘, 마룡지)의 관리를 철저히 하고, 개발계획 수립시 의회와 사전 소통하기 바람	▸서동생가터 등 무왕 관련 생활유적은 고도지구 확대 조정시 포함시켜 보존․정비토록 할 계획이며, 향후 개발계획 수립시 토론회 및 의회 의견청취 (간담회) 등 다양한 의견을 수렴토록 하겠음
2	• 기술용역 관련 ▸옥룡천 하천기본계획변경수립 전략환경영향평가용역과 소규모환경영향평가용역은 동일한 업체에 별건으로 발주한 바 향후 유사 용역에 대해 예산절감을 위하여 일괄 발주하여 추진하기 바람	▸향후 유사용역에 대하여 관련규정에 의거 일괄 발주 여부 확인 후 추진하겠음
3	• 옥룡천 옛물길 회복사업 관련 ▸옥룡천의 적정 유수․유량 조절을 통해 침수피해에 대비하고 사업기간에 차질이 발생하지 않도록 원만한 협의 보상에 노력하기 바람	▸우기시 침수피해 예방 및 옥룡천 관리를 위한 적정한 유량공급을 위하여 농어촌공사 익산지사와 협의 추진중이며 보상에 따른 주민과의 민원이 최소화될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠음
4	• 이주단지 조성사업 관련 ▸이주단지 조성사업도 원만한 협의보상에 노력하고 건축비가 더 소요되더라도 당초 계획대로 전통가옥형으로 추진하기 바람	▸원활한 사업추진을 위한 주민과의 협의보상에 노력하고 있으며 전통가옥형 추진에 대하여 2종지구 단위계획상 권고사항으로 전통한옥으로 건축할 수 있도록 수립되어 있으며 한옥건축이 추진될 수 있도록 행정적인 지원을 할 계획임

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과	비고
5	• 무형문화재 강사수당 관리․감독 철저 ▸이리농악 및 이리향제줄풍류 후계자양성 강사수당 지급과 관련하여 교육 일시 및 대상, 교육이수 후 활용 등을 정확히 파악하고 현지 확인 하는 등 보조금이 제대로 집행될 수 있도록 관리․감독을 철저히 하기 바람	▸무형문화재 후계자양성 강사수당 지급과 관련하여 교육 활성화 및 보조금을 투명하게 집행토록 지도 하였으며, 향후 사업계획에 따라 후계자양성 교육이 철저히 이루어질 수 있도록 지속적으로 지도․감독 하겠음
6	• 관계부처간 협의 관련 ▸미륵사지석탑 사리장엄 국보지정 지연과 미륵사지유물전시관 국가귀속 지연문제 해결을 위해 중앙부처, 전라북도와 긴밀히 협력하기 바람	▸미륵사지석탑 사리장엄은 현재 국립미륵사지유물전시관에 보관 전시되고 있으며, 보관관리기관 지정완료(‘15.12.29.)에 따라 국립중앙박물관(국립미륵사지유물전시관)에서 국가지정문화재 지정신청서 준비 중임 ▸2016년 하반기에 보물지정을 신청할 예정이며, 지정단계를 거쳐 국보 지정 추진 예정 ▸문화재청과 국립중앙박물관에 국가지정문화재 개별지정 촉구 협조 요청 등 추진 중 ▸의회 건의문 채택에 따른 문화재청, 국립중앙박물관 공문 발송(2016.5.4.)
7	• 천호동굴 관광자원화 ▸천호동굴은 이색 관광자원으로서 활용가치가 높으니 회복기간 이후 개발계획을 적극 검토하기 바람	▸천호동굴은 천연기념물의 보존을 위하여 2021. 05. 31일까지 공개제한 고시(문화재청 고시 제2011-96호, 2011. 05. 26)된 지역으로, 동굴주변 문화재보호구역토지를 매입하여 오염원 제거 및 주변에 초지를 조성하여 동굴 자생여건 회복중이며, 추후 문화재청과 협의하여 여건에 따라 개방 및 개발 검토하겠음

4. 2015상급기관 감사 지적사항 및 조치 결과

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	문화재시설계장		배석희	□

감사기간	2015. 10. 2 ～ 10. 8	감사기관	전라북도
지 적 사 항		조 치 결 과
• 공사현장 임시소방시설 미설치 • 품질관리 시험실 및 시험기술자 미배치 • 건축공사 추진 부적정 ▸우레탄도막방수(벽)가 1㎜로 발주 하여야 함에도 시공이 어려운 3㎜로 설계 ▸가설공사 중 먹메김 건축목공 품 170m가 중복설계 ▸현장내조립식 가설울타리(EGI철판) 42m 미시공		• 공사현장 임시소방시설 설치 완료 ▸임시소방시설(소화기, 비상경보장치, 간이소화장치, 간이피난유도선)을 설치 • 품질관리 시험실 설치 및 품질관리자 배치 완료 • 기 지급된 1,623천원 회수 및 설계 변경을 통해 2,087천원 감액 완료

5. 시정질문 조치 결과

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		정창우	□

해  당  없  음

6. 주요사업 조서(3천만원 이상)

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		정창우	□
		고도육성계장		유원향	□
		문화재시설계장		배 석 희	□
		세계유산계장		김민규	□

(단위 : 천원)

사 업 명	사업개요	사업비	집행액	잔 액	추진사항	비고
계	33개 사업	20,317,709	8,324,267	11,993,442
익산 역사문화도시 및 창조도시 조성 기본계획 연구용역	역사문화도시 조성 기본계획 수립	141,000	70,500	70,500	용역추진 (2015.7.30.~ 2016.7.29.)	명시 이월
익산역사문화 콘텐츠 개발 기본계획 연구용역	문화콘텐츠개발 기본계획 수립	92,140	0	92,140	용역완료 (2015.8.7.~ 2016.4.6.)	명시 이월
역사고도 익산의 정체성확립 학술회의	<고조선과 익산> 학술회의 개최	50,000	49,878	122	완료
역사고도 익산 연구문헌 목록 발간사업	<고도익산 마한백제문화유산 논저목록>발간	40,000	39,996	4	완료
2014 고도육성기반구축	아카데미,포럼, 계간지발간 등	74,333	74,333	0	완료
2015 고도육성기반구축	아카데미,포럼, 계간지발간 등	62,373	31,187	31,186	완료 (2015.5.4.~ 2016.1.4.)	명시 이월
고도보존육성기본계획변경용역	고도지구 추가 지정(안) 및 기본계획변경(안)수립	300,000	133,670	166,330	용역추진 (2015.4.24.~2016.6.23)	명시 이월
주거환경개선 가이드라인용역	백제건축,조경, 디자인요소발굴	80,000	38,500	41,500	용역완료 (2015.3.16.~2016.3.21)	사고 이월
객사관아터 유적발굴조사용역	객사관아터 유적발굴조사용역	280,000	23,620	256,380	용역추진중 (2015.11~2016.12)	명시 이월
객사관아터 유적발굴조사	지장물 철거 및 복원	119,136	6,217	112,919	공사추진중 (2015.9~2016.12)	명시 이월
2014 이주단지 조성사업 (토지매입비및공사비등)	발굴조사, 토지매입, 조성공사	2,391,780	824,419	1,567,361	공사추진중 (2015.3~2016.12)	사고 이월
2015 이주단지 조성사업	토지매입, 조성공사	1,875,337	147,921	1,727,416	공사추진중 (2015.3~2016.12)	명시 이월
2014옥룡천 옛물길 회복사업	1차토지매입 (천변공원조성부지)	1,411,958	1,411,958	0	보상협의추진 (2015.1~2015.12)
2015옥룡천옛물길 회복사업	천변공원및신규탐방로조성,토지매입	4,405,668	1,255,713	3,149,955	공사추진중 (2015.2~2017.12)	명시 이월
이주단지조성사업전력공급	이주단지 지중화사업분담금	120,000	94,781	25,219	집행완료
고도이미지 찾기 사업	한옥 및 담장․대문 / 가로변외관정비사업지원	2,857,000	0	2,857,000	한옥2건(200백만원) 담장2건(40백만원) -공사완료 후 집행	계속비 이월
익산 중앙동 구 삼산의원정비	지붕 보수	30,000	25,812	4,188	완료
익산 함라마을 옛담장정비	노후담장보수	35,000	34,260	740	완료
익산 숭림사 보광전 주변정비	배수로 정비, 담장보수	30,000	28,152	1,848	완료
익산 나바위성당 정비	벽체 보수 등	241,627	174,099	67,528	완료	명시 이월
2015 왕궁리유적 정비	동측 및 서측 궁장정비, 서측 배수시설 정비	1,297,660	562,524	735,136	완료	계속비이 월
제석사지 정비	문화재구역 토지매입	498,200	201,299	296,901	토지매입 및 정비 공사 추진중 (30%)	계속비이 월
익산향교 대성전 정비	대성전 해체보수 및 흰개미 피해보수	300,000	290,966	9,034	완료
여산향교 대성전 정비	대성전 해체보수 및 흰개미 피해보수	180,000	109,770	70,230	완료	명시 이월
익산 미륵산성 발굴조사 용역	정상부 정비에 따른 발굴조사	100,000	96,360	3,640	완료
조해영가옥정비	문간채 지붕 보수 등	30,000	27,923	2,077	완료
김안균 가옥정비	비각보수, 화장실신축 등	90,000	80,767	9,233	완료
익산 중요무형문화재 통합전수관 건립 (건축․전기․통신․소방)	전수관 및 실내외 공연장 건립	2,624,497	2,054,166	570,331	공사추진중 (80%)	계속비 이월
원불교 익산성지 재난방지시스템 구축	재난방지시스템(소방설비) 구축	200,000	195,680	4,320	완료
숭림사 보광전 전기시설 개선사업	노후 전기시설 개선	100,000	76,830	23,170	완료
세계유산 체감형 디지털 헤리티지 구축사업	세계유산 콘텐츠 개발	160,000	160,000	0	완료
세계유산 홍보 책자 제작	세계유산 외국어판 홍보책자 제작	40,000	2,966	37,034	제작완료 (2016.2.26.~ 2016.4.10)	명시 이월
세계유산 활용 홍보계획수립 연구용역	세계유산 활용홍보사업발굴	60,000	0	60,000	용역추진 (2016.2.1.~ 2016.7.30.)	명시 이월

7. 2015 각종 민원(진정, 건의, 청원 등) 접수 처리내역

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		정창우	□
		고도육성계장		유원향	□
		문화재시설계장		배 석 희	□
		세계유산계장		김민규	□

종 류	민원인	요 구 내 용	처 리 내 용
진정	심재석 (2015.1.28.)	옥룡천 옛물길 회복사업 편입토지 손실보상금 이의신청	이의신청사항 현지조사 후 재감정 및 보상협의완료(2015.8.17.)
	김명환 (2015.3.23.)	심포지엄, 학술대회 개최시 홍보, 공지 부족	행사 개최 시 체계적인 홍보를 통해 많은 시민들이 참여할 수 있도록 노력하겠음
	김명환 (2015.10.6.)	백제의 익산천도 관련 사실 규명 요구 및 오층석탑 내 사리 관련 정보 요청	백제의 익산천도 규명과 관련해 학계에서 연구가 진행중이며 왕궁리오층석탑 해체보수 시 작성된 보고서는 우리시에서 보관하고 있지 않아 정보가 없음을 회신
건의	송강자 (2015.5.28.)	덕기동 산59-1번지 주변 문화재 현상변경 허용기준 변경관련 건의	추후 현상변경 허용기준 재조정시 반영 검토
	박규복 (2015.5.28.)	이주단지 조성사업 관련 현실성 있는 이주대책 마련건의	이주단지 조성사업 추진과정에서 적극적인 설명과 홍보로 이해당사자인 지역주민의 의견 최대한 반영추진하겠음

8. 기금 운용 관련사항

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		정창우	□

해  당  없  음

9. 위원회(자문위원회 포함) 운영 관련

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	고도육성계장		유원향	□
		문화재시설계장		배 석 희	□

□ 위원회 설치 및 운영현황                               (단위: 천원)

위 원 회 명	설치근거	위원장	구성원수	기능 구분	운영횟수	예 산 현 황
						운영예산	위원수당 지급내역	불용예산 현 황
계	2개		26
익산시 향토유적 심의 위원회	익산시 향토유적 보호조례 제3조	부시장	11	심의		630	0	630
익산시 고도 보존육성지역 심의위원회	익산시 고도보존 육성 및 주민지원에 관한 조례 제5조	김선기	15	심의	8	6,300	4,005	2,295

□ 익산시향토유적심의위원회 위원 명단

직 위	성 명	선임일자	소속 또는 주소	직 위	성 명	선임일자	소속 또는 주소
위원장	이지영	당연직	부시장	위 원	김정희	2015.4.1	원광대 고고미술사학과 교수
위 원	김주일	당연직	문화산업국장	〃	전경미	〃	예원대 문화재학부 교수
〃	이다운	2015.4.1	원광대 역사교육과 교수	〃	홍승재	〃	원광대 건축공학부 교수
〃	안승모	〃	원광대 고고미술사학과 교수	〃	임홍낙	〃	익산고등학교교장 (향 토 사)
〃	김선기	〃	원광대 박물관 학예연구팀장	〃	배병선	〃	국립부여문화재 연구소장
〃	남해경	〃	전북대 건축공학부교수

□ 익산시 고도보존육성지역심의위원회 위원 명단

직 위	성 명	선임일자	소속 또는 주소	직 위	성 명	선임일자	소속 또는 주소
위원장	김선기	2014.9.11	원광대 박물관 학예연구팀장	위 원	홍승재	2014.9.11	원광대 건축공학부 교수
부위원장	김현숙	〃	전북대 도시계획 교수	〃	이다운	〃	원광대 역사교육과 교수
위 원	김연식	〃	익산시의회 의원	〃	윤충열	〃	원광대 건축학과 교수
〃	송호진	〃	익산시의회 의원	〃	오민근	〃	CRCG 대표
〃	민두희	〃	고도보존 주민협회장	〃	명 현	〃	전북대 환경조경디자인학과 교수
〃	이충용	〃	구 금마면 이장협의회장	〃	이경찬	〃	원광대 도시공학과 교수
〃	이준기	〃	구 금마면 번영회회장	〃	송일섭	〃	(주)인우건설 대표
〃	김옥수	〃	금마면 주민자치위원회 위원장

10. 용역사업 관련

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		정창우	□
		고도육성계장		유원향	□
		문화재시설계장		배 석 희	□
		세계유산계장		김민규	□

□ 사업조서

(단위 : 천원)

구 분	사 업 명	용역업체	용역비	계약방법	추진사항
계	9개 사업		980,977
학술연구 용역	익산 역사문화도시 및 창조도시 조성 기본계획 연구용역	(사)대한국토· 도시계획학회	141,000	수의계약	용역추진 (2015.7.30.~ 2016.7.29.)
학술연구용역	익산 역사문화콘텐츠 개발 기본계획 연구용역	한국문화관광 연구원	92,140	수의계약	용역완료 (2015.8.7.~ 2016.4.6.)
민간위탁 용역	2014 고도육성기반구축	(재)전북문화재 연구원	148,665	제한경쟁	완료 (2014.5.26.~ 2015.7.28.)
민간위탁 용역	2015 고도육성기반구축	전주비전대학교 산학협력단	62,373	제한경쟁	완료 (2015.5.4.~ 2016.1.4.)
학술연구 용역	객사관아터 발굴복원을 위한 문화재시굴조사용역	(재)전북문화재 연구원	35,345	수의계약	완료 (2016. 1. 29)
학술연구 용역	고도보존육성기본계획변경용역	국토연구원	267,340	수의계약	용역추진 (2015.4.24.~ 2016.6.23)
학술연구 용역	주거환경개선 가이드라인용역	원광대학교 산학협력단	77,754	협상계약	용역완료 (2015.3.16.~ 2016.3.21)
학술연구 용역	익산 미륵산성 발굴조사 용역	(재)전북문화재 연구원	96,360	수의계약	완료 (2015.7.23.)
학술연구 용역	세계유산 활용홍보계획 수립 연구용역	원광대학교 산학협력단	60,000	수의계약	용역추진 (2016.2.1.~ 2016.7.30.)

11. 인․허가 민원처리 관련사항

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	고도육성계장		유원향	□

○ 고도지구내 행위허가

구분	허가 신청				처리 결과								비고
	계	신축	증축	기타	계		신축		증축		기타
					허가	불허가	허가	불허가	허가	불허가	허가	불허가
2015	12	8	1	3	12		8		1		3

12. 각종공사 설계 변경상황

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	문화재시설계장		배 석 희	□

(단위 : 천원)

일자	사업명	계약액	변경액	증 감	계약자	공사기간	변경사유등
계	18개 사업	10,410,168	10,594,133	183,965
2015.4.23	2014년 왕궁리유적정비공사	663,872	671,172	7,300	(유)남전 종합건설	2014.7.21~ 2015.4.28	문지 상부마감변경 등 문화재청 기술 지도사항 반영
2015.4.29	2014년 왕궁리 오층석탑 보존처리공사	116,859	124,995	8,136	한림보존테크	2014.10.27~ 2015.4.30	문화재청 기술지도 및 주변정비 사항에 대한 반영
2015.5.8	조해영가옥 보수정비공사	22,800	24,475	1,675	(주)다온	2015.4.27~ 2015.6.25	기와해체후 현장조사 결과에 따른 기와 잇기 면적 추가
2015.6.15	익산고도리 석조여래입상 주변정비공사	6,943	7,469	526	㈜다온	2015.5.20.~ 2015.6.18	현장조사결과 부식 확인된 교량목재면 도장
2015.6.15	익산 중앙동 구삼산의원 보수정비공사	22,511	21,685	△826	㈜대창 건설	2015.5.20.~ 2015.6.18	사업내역변경 반영
2015.6.20	익산중요무형 문화재통합전수관 및 시립국악원 건립공사(건축)	3,891,146	3,937,784	46,638	(유)제인건설	2014.10.8.~ 2015.12.21	연약지반 붕괴방지 흙막이 설치 등 변경사항 반영
2015.6.25	익산나바위성당긴급방재공사	23,112	28,483	5,371	백제문화재보존연구소	2015.6.12.~ 2015.7.28	문화재청현장자문 결과 반영 변경
2015.7.14	김안균가옥 보수정비공사	58,793	56,009	△2,784	㈜다온	2015.5.11.~ 2015.8.8	현장조사 결과에 따른 목공사 감소분 등 반영
2015.7.14	김안균가옥 보수정비공사 (전기)	10,991	15,701	4,710	㈜다온	2015.5.11.~ 2015.8.8	등기구 추가분 반영
2015.7.17	원불교 익산성지 재난방지시스템 구축사업(건축)	32,610	25,547	△7,063	㈜대대종합건설	2015.4.27.~ 2015.9.5	기계실 신축 감소
2015.7.17	원불교 익산성지 재난방지시스템 구축사업(소방)	137,714	161,714	24,000	(유)한성 소방	2015.4.30.~ 2015.9.8	배관동선 변경에 따른 터파기물량 및 포장증가
2015.7.17	익산 함라마을 옛담장 보수공사	26,646	30,136	3,490	㈜다온	2015.6.11.~ 2015.7.20	담장 보수구간 추가
2015.9.11	익산향교 대성전 보수 정비공사	237,515	269,249	31,734	㈜동강 종합건설	2015.5.18.~ 2016.1.12	대성전해체결과 목재부식이 심각하여 목재 교체수량 증가
2015.10.23	익산중요무형 문화재통합전수관 및 시립국악원 건립공사(건축)	3,937,784	3,967,058	29,274	(유)제인건설	2014.10.8.~ 2016.2.18	동측 법면쌓기 및 외벽 마감재 변경 등 반영
2015.10.23	익산춘포리 구 일본인농장가옥 재난방지시스템구축사업(소방)	13,496	13,263	△233	(유)육영건설	2015.9.7.~ 2015.10.26	자재수급 불가에 따른 자재 변경
2015.12.1	2015 왕궁리유적 정비공사	943,696	955,406	11,710	(유)서림문화재	2015.9.30.~ 2016.1.27	배수펌핑시설, 석축 및 옹벽시설 변경 사항 반영
2015.12.2	익산중요무형 문화재통합전수관 및 시립국악원 건립공사 (전기2차분)	152,294	183,507	31,213	명광전력	2014.10.8.~ 2016.2.18	현장 여견변화에 따른 물량증가분반영
2015.12.2	익산 나바위성당 보수정비공사	111,386	100,480	△10,906	(유)서림문화재	2015.10.8.~ 2016.1.5	문화재청 지도의견에 따른 사업물량 감소분반영

13. 건설공사 집행 현황(3천만원 이상)

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	고도육성계장		유원향	□
		문화재시설계장		배 석 희	□

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 내 용	사업비	집행액	잔 액	추진사항	비고
계	11개 사업	9,335,901	4,551,402	4,784,499
2014 이주단지 조성사업 (토지매입비및공사비등)	발굴조사, 토지매입, 조성공사	2,391,780	824,419	1,567,361	공사추진중 (2015.3~2016.12)	사고 이월
2015 이주단지 조성사업	토지매입, 조성공사	1,875,337	147,921	1,727,416	공사추진중 (2015.3~2016.12)	명시 이월
익산 함라마을 옛담장 정비	노후담장보수	35,000	34,260	740	완료
익산 나바위성당 정비	벽체 보수 등	241,627	174,099	67,528	완료	명시 이월
2015왕궁리 유적 정비	동측 및 서측 궁장정비, 서측 배수시설 정비	1,297,660	562,524	735,136	완료	계속비 이월
익산향교 대성전 정비	대성전 해체보수 및 흰개미 피해보수	300,000	290,966	9,034	완료
여산향교 대성전 정비	대성전 해체보수 및 흰개미 피해보수	180,000	109,770	70,230	완료	명시 이월
김안균 가옥정비	비각보수, 화장실신축 등	90,000	80,767	9,233	완료
익산 중요무형문화재 통합전수관 건립 (건축․전기․통신․소방)	전수관 및 실내외 공연장 건립	2,624,497	2,054,166	570,331	공사추진중 (2014.10~2016.8.)	계속비 이월
원불교 익산성지 재난방지시스템 구축	재난방지시스템(소방설비) 구축	200,000	195,680	4,320	완료
숭림사 보광전 전기시설 개선사업	노후 전기시설 개선	100,000	76,830	23,170	완료

14. 민간에 대한 보조금 집행 내역

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		정창우	□
		고도육성계장		유원향	□
		문화재시설계장		배 석 희	□
		세계유산계장		김민규	□

(단위 : 천원)

단 체 명	사 업 명	예 산 액	집 행 액	잔 액	비 고
합 계	8개 단체 / 17개사업	484,800	484,050	750
한국고대사학회 (우석대산학협력단)	역사고도 익산의 정체성 확립 학술회의	50,000	49,878	122
마한백제 문화연구소	역사고도 익산 연구문헌 목록 발간사업	40,000	39,996	4
(사)익산고도육성세계유산보전관리주민협의회	익산고도육성·세계유산 보전관리 주민협의회 운영	24,000	23,756	244
	고도 경관 환경정화사업	30,000	29,650	350
이리농악 보존회	이리농악 전수교육 육성사업	50,000	50,000	0
	이리농악전수교육관 운영	10,000	9,999	1
	이리농악 전수교육관 활성화사업	6,000	6,000	0
	대한민국 농악축제	13,000	13,000	0
	이리농악 기록화사업	30,000	30,000	0
이리향제 줄풍류보존회	이리향제줄풍류전수교육 육성사업	30,000	30,000	0
	이리향제줄풍류 전수교육관 운영	10,000	9,971	29
	이리향제줄풍류 전수교육관 활성화사업	7,500	7,500	0
익산기세배보존회	익산기세배 전수교육관 운영	10,000	10,000	0
	익산기세배공개행사비	3,400	3,400	0
	익산기세배 전수교육관 활성화사업	7,500	7,500	0
익산목발노래보존회	익산목발노래공개행사비	3,400	3,400	0
전북디지털산업 진흥원	세계유산 체감형 디지털 헤리티지 구축사업	160,000	160,000	0

▣ 보조금 지원 책정 기준 지급근거

◦ 비영리민간단체지원법 제6조

◦ 고도 보존 및 육성에 관한 특별법 제17조의2

◦ 문화재보호법 제72조

◦ 익산시 보조금 관리에 관한 조례 제6조

15. 국․도비 보조사업 집행현황(1억원이상)

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	고도육성계장		유원향	□
		문화재시설계장		배 석 희	□

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액				집 행 액				잔 액	비고
	계	국비	도비	시비	계	국비	도비	시비
계 (12개 사업)	15,726,727	10,107,810	2,789,459	2,829,458	7,362,185	4,423,045	1,450,003	1,489,137	8,364,542
고도보존육성 기본계획변경용역	300,000	210,000	45,000	45,000	133,670	93,570	20,050	20,050	166,330	용역추진 (2015.4.~2016.6.) 명시이월
2014 이주단지 조성사업	2,391,780	1,674,246	358,767	358,767	824,419	577,093	123,663	123,663	1,567,361	공사추진 (2015.3~2016.12) 사고이월
2015 이주단지 조성사업	1,875,337	1,312,736	281,301	281,300	147,921	103,545	22,188	22,188	1,727,416	공사추진 (2015.3~2016.12) 명시이월
2014옥룡천옛물길 회복사업	1,411,958	988,370	211,794	211,794	1,411,958	988,370	211,794	211,794	0	집행완료
2015옥룡천옛물길 회복사업	4,405,668	3,083,968	660,850	660,850	1,255,713	878,999	188,357	188,357	3,149,955	토지매입 및 공사추진중 (2015.2~2017.12)
익산나바위성당정비	241,627	169,139	36,244	36,244	174,099	121,869	26,115	26,115	67,528	완료
2015왕궁리 유적정비	1,297,660	908,362	194,649	194,649	562,524	393,767	84,379	84,378	735,136	완료 계속비이월
제석사지 정비	498,200	348,740	74,730	74,730	201,299	140,909	30,195	30,195	296,901	토지매입 및 정비공사 추진중 (2015.3~2016.11) 계속비이월
익산향교 대성전 정비	300,000		150,000	150,000	290,966	0	145,483	145,483	9,034	완료
여산향교 대성전 정비	180,000		90,000	90,000	109,770	0	54,885	54,885	70,230	완료 명시이월
익산 중요무형문화재 통합전수관 건립	2,624,497	1,312,249	656,124	656,124	2,054,166	1,027,083	513,542	513,541	570,331	공사추진 (2013~2016)
원불교 익산성지 재난방지시스템 구축	200,000	100,000	30,000	70,000	195,680	97,840	29,352	68,488	4,320	완료

16. 명시 및 사고이월사업비 집행 내역

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		정창우	□
		고도육성계장		유원향	□
		문화재시설계장		배 석 희	□

□ 명시 및 사고이월 내역 : 10건〔명시〕

(단위 : 천원)

사 업 명	이월액	집행액	잔 액	추진율 (%)	준 공 (완료예정일)	추 진 내 역
계	4,736,452	3,081,264	1,655,188
2014 고도육성기반구축	74,333	74,333	0	100	2015.07.28	완료
시행계획 고시등 일간지 공고료 매수청구 토지등감정평가수수료 (2014고도육성사업)	2,918	2,918	0	100	2015.03.11	집행완료
주거환경개선 가이드라인용역	80,000	38,500	41,500	100	2016.03.21	용역완료
2014 이주단지 조성사업	2,391,780	824,419	1,567,361	65	2016.12.30	공사추진중 (2015.3~2016.12)
2014옥룡천 옛물길 회복사업	1,411,958	1,411,958	0	100	2015.12.30	보상완료
여산숲정이 순교성지 주변정비	33,819	0	33,819	80	2016.06.20	용역 진행중 (2015.11~2016.6)
왕궁리오층석탑 (보존처리)	134,017	121,509	12,508	100	2015.04.30	공사완료
익산 나바위성당 종합정비계획 및 정밀안전진단	142,627	142,627	0	100	2015.09.01	용역완료
익산 춘포리 구 일본인 농장가옥 재난방지시스템 구축	15,000	15,000	0	100	2015.04.15	공사완료
미륵사지 복원 및 정비연구	450,000	450,000	0	100	2016.12.31	사업진행중 (교부완료)

17. 2016년도 명시이월 내역

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		정창우	□
		고도육성계장		유원향	□
		문화재시설계장		배석희	□
		세계유산계장		김민규	□

(단위 : 천원)

사 업 명	명 시 이월액	명시이월사유	비 고
계	6,272,863
익산 역사문화도시 및 창조도시 조성 기본계획 연구용역	70,500	◦준공시기 미도래 - 용역 2016. 7월 준공
익산 역사문화콘텐츠 개발 기본계획 연구용역	92,140	◦준공시기 미도래 - 용역 2016. 4. 6일 준공
2015고도육성기반구축 (아카데미,계간지발간등)	31,186	◦준공시기 미도래 - 용역 2016. 1월 준공
시행계획 고시등 일간지 공고료 매수청구 토지등감정평가수수료	4,989	◦시기 미도래 - 시행계획 2016. 3월 공고
고도보존육성기본계획 변경용역	166,330	◦준공시기 미도래 - 용역추진 2016. 6월 준공
객사관아터 유적 발굴조사 용역	250,000	◦준공시기 미도래 - 용역추진 2016. 7월 준공
옥룡천 옛물길 회복사업	3,149,955	◦준공시기미도래 - 천변공원 및 신규탐방로 편입토지 보상협의중으로 공사발주가 지연됨
이주단지 조성사업	1,727,416	◦준공시기 미도래 - 공사추진중 2016. 12월 준공
객사 관아터 유적 발굴조사	112,919	◦준공시기 미도래 - 용역추진중 2016. 7월준공
옥룡천 옛물길 회복사업 시설부대비	6,650	◦준공시기미도래 - 토지매입중으로 공사발주가 지연됨
이주단지 조성사업 시설부대비	2,350	◦준공시기 미도래 - 공사추진중 2016. 12월 준공
익산 나바위성당 정비	67,528	◦문화재청 설계승인 지연에 따른 착공 지연
여산숲정이 순교성지 주변정비	25,000	◦연차적사업계획에 따라 2015년 사업예산과 2016년도 예산을 연계하여 토지매입 추진
여산향교 대성전 정비	70,230	◦대성전 해체보수공사 진행중 목부재 부식이 심각하여 전문가 자문에 따른 설계변경 및 공기연장 추진
서동생가터 정비사업 토지매입 등	398,636	◦준공시기 미도래 - 토지매입에 따른 소유주와 협의 및 감정평가 기간 소요
세계유산 홍보책자 제작 (영문,일문,중문)	37,034	◦행정절차 이행 및 준공시기 미도래
세계유산 활용 홍보계획 수립 연구용역	60,000	◦행정절차 이행 및 용역수행기간(6개월) 필요

18. 예산전용 사항 및 예비비 집행 현황

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		정창우	□

해  당  없  음

19. 공사 준공기한 연장 내역

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	문화재시설계장		배석희	□

주요사업명	계약액	변경액	연장사유
	당초	변경
익산향교 대성전 보수정비공사	2015.5.18.~ 2015.11.13	2015.5.18.~ 2016.1.12	보수물량 증가로 인한 소요공기 반영

20. 국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		정창우	□

해  당  없  음

21. 국․도비 반납 현황 및 사유(2015년도 반납건)

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	고도육성계장		유원향	□
		문화재시설계장		배 석 희	□

(단위 : 천원)

사 업 명	예산액	집행액	잔 액	반 환 금				시비	반납 사유	비고
				계	국 비	도 비	이자
계	7,616,740	7,295,905	320,835	250,434	183,725	66,678	31	70,432	집행잔액
2010년 문화재 안전경비인력 배치사업	58,000	44,898	13,102	9,827	6,551	3,276		3,275	〃
2013년 전통사찰 보수정비사업	220,000	205,656	14,344	10,758	7,172	3,586		3,586	〃
2014년 생생 문화재 사업	60,000	60,000		28			28		〃
2014년 안전경비인력 배치사업	109,248	96,243	13,005	8,454	6,503	1,951		4,551	〃
2014년 무형 문화재 전수 교육관 활성화사업	6,000	6,000		3			3		〃
2014년 도지정문화재 보수 정비사업	698,928	689,524	9,404	4,702		4,702		4,702	〃
2013년 도지정 문화재 보수 정비사업	66,007	56,377	9,630	4,815		4,815		4,815	〃
2012년 문화재 보수정비사업	1,857,143	1,795,057	62,086	52,773	43,460	9,313		9,313	〃
2013년 문화재 보수정비사업	3,585,714	3,533,974	51,740	43,979	36,218	7,761		7,761	〃
2014년 문화재 재난방지시스템구축사업	49,500	43,473	6,027	4,281	3,531	750		1,746	〃
2014년 문화재 보수정비사업	845,000	704,303	140,697	110,494	80,290	30,204		30,203	〃
2014년 무형문 화재 전수활동비	61,200	60,400	800	320		320		480	〃

22. 2015년도 계획사업 중 미착공사업 현황

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		정창우	□

해  당  없  음

23. 2015년도 계획사업 중 유보 및 취소 사업현황

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		정창우	□

해  당  없  음

24. 2015년도 이월사업 중 유보 및 취소 사업현황

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		정창우	□

해  당  없  음

25. 2015년도 예산편성 후 전액 미집행 내역

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		정창우	□

해  당  없  음

26. 소송 사건 현황

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		정창우	□

해  당  없  음

27. 시 홈페이지 접수 민원처리 실태현황

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	문화재시설계장		배석희	□

연번	홈페이지 접수 민원	조치(처리)결과	비고
1	•미륵산 사자암 급수대 수리 요망 ▸사자암 급수대 누수로 인한 수리요망	▸모터부품 문제로 교체하여 급수대 수리 완료
2	•김육불망비 보호대책 건의 ▸김육불망비 보호를 위한 비각 및 안내판 설치 및 주변 건물 철거 요청	▸철거요청한 건물은 사유지라 철거가 어렵고, 문화재 원형 보존을 위해 비각을 설치하는 것은 신중한 검토가 필요하며 주변 안내판에 김육불망비 위치를 표기하였음
3	•화산서원 긴급 보수 요구 민원 ▸화산서원 보수 요청	▸화산서원은 지정문화재가 아닌 시설물로써 우리시의 예산 지원을 통한 보수는 어려움을 통지
4	•왕궁리 오층석탑 보수 관련 ▸왕궁리오층석탑 보존처리 공사로 관람 불편사항 민원	▸관람 가능한 일자를 안내하지않아 관람에 불편을 드려 죄송하며 추후 이런 사례가 재발하지 않도록 노력하겠음을 통지
5	•미륵산 등산로에 설치된 푯말민원 ▸미륵산 등산로 설치푯말 제거요청	▸등산로 푯말 제거하였고 추후 이런 사례가 재발하지 않도록 노력하겠음을 통지
6	•연수원 음용수대 관련 민원 ▸음용수 수질문의	▸매년 수질검사를 시행하며 수질검사 성적서를 부착 완료하였음
7	•익산 향토유적 관리 ‘사각지대’ 대책 건의 ▸김육불망비 관리 개선 요구	▸김육불망비 개별안내판 및 권역안내판 위치표기 완료 하였으며 소유자 및 관리자와 협의하여 주변 정비에 노력을 다하겠음을 통지
8	•미륵산 화장실(기양제길) 주변 흙먼지털이개(에어건) 이설 요청 ▸소음 및 먼지발생으로 인한 이설 요청	▸먼지털이개(에어건) 이설 완료
9	•미륵산 주차장 입구 에어건 관련민원 ▸흙먼지털이개 이설준비로 사용중단에 따른 재개요청	▸흙먼지털이개 이설 후 사용재개

감사자료 과 요구사항

1. 백제역사유적지구 세계유산 등재 추진실적

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	세계유산계장		김민규	□

□ 사 업 개 요

◦ 대상유적 : 미륵사지, 왕궁리유적

◦ 사업기간 : 2007 ~ 2015

◦ 사 업 비 : 281.7백만원(시비)

◦ 사업내용 : 39차 세계유산총회 참가, 등재홍보 등

□ 추 진 실 적

◦ 이코모스(세계유산자문기구) 등재권고 평가        : 2015. 5. 4.

◦ 백제역사유적지구 세계유산 등재 최종 결정       : 2015. 7. 8.

‣제39차 세계유산위원회 총회/독일 본

◦ 세계유산 등재 경축분위기 조성 집중 홍보        : 2015. 7.~ 12.

‣세계유산 도로표지판, 관광안내판 정비(관내129개소)

‣세계유산 등재 홍보 현수막 게첩(279개소)

◦ 세계유산 등재 홍보 부스 운영                   : 2015. 7.~ 10.

‣홍보물 배부, 농특산물 판매 등

◦ 차세대 실감콘텐츠 제작지원 공모사업            : 2015. 7.~ 2016. 2.

‣주관기관 : 미래창조과학부/미륵사지유물전시관 설치

◦ 세계유산 홍보영상물 제작(일반용, 학생용)        : 2015. 8.~ 12.

‣초중고(107), 읍면동(37), 유관기관(41) 배부

◦ 세계문화유산도시협의회 가입 및 참여            : 2015. 9. 16.

‣국내 13개 세계유산도시 단체장 협의회

◦ 세계유산 등재 선포식 개최                      : 2015. 9. 22.

‣미륵사지/대통령 서면축사, 인증서 전달 등

2. 고도육성 기반구축사업 추진실적

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	역사도시계장		정창우	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2016. 1.

◦ 사 업 비 : 62백만원 (국비 44  도비 9  시비 9)

◦ 사업내용

▸고도육성 아카데미 운영 : 아카데미 강좌

▸고도육성 포럼·워크숍 운영 : 전문가 포럼을 통해 고도육성사업 방향 제시 등

▸고도육성 홍보 계간지 발간 : 고도육성사업, 세계유산등재, 고도익산의 새로운

가치 등 소개 및 홍보

□ 추 진 실 적

◦ 고도육성 아카데미 운영                      : 2015. 7. ~ 10.

▸아카데미 강좌(1기) : 2015. 07. 16. ~ 08. 27. (수료 39명)

▸아카데미 강좌(2기) : 2015. 09. 03. ~ 10. 08. (수료 33명)

▸국내 선진지 답사(부여) 1회 : 2015. 10. 15. (35명 : 1기, 2기 수료생)

◦ 고도육성 전문가 포럼 및 워크숍              : 2015. 12.

▸포럼(1회) : 2015. 12. 08.  /  워크숍(1회) : 2015. 12. 24.

◦ 고도 홍보 계간지 발간 및 배포               : 2015. 7. ~ 12.

▸4회 발간 : 15호(6월), 16호(8월), 17호(10월), 18호(12월)

3. 옥룡천 옛물길 회복사업 추진실적

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	고도육성계장		유원향	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2013 ~ 2017 (5년)

◦ 총사업비 : 7,800백만원 (국비 5,460  도비 1,170  시비 1,170)

◦ 사 업 량 : L=1.4㎞ (금마저수지 ~ 지방도720호)

◦ 사업내용

▸시설공사 : 기포장구간 재포장(L=1,466m), 교량리모델링(4개소),

신규 탐방로(L=400m), 천변공원(A=8,670㎡)

▸보상계획 : 58필지 10,019㎡  건물 25동

□ 추 진 실 적

◦ 옥룡천 전략환경영향평가 용역 완료     : 2013.  4. 23. ~ 2014. 3. 25.

◦ 하천기본계획변경 및 실시설계용역 완료	: 2013.  5. 15. ~ 2015. 2. 16.

◦ 옥룡천 주변 도시관리계획 변경용역 완료	: 2013. 11. 08. ~ 2015. 2. 16.

◦ 옥룡천 소규모 환경영향평가용역 완료   : 2013. 11. 13. ~ 2015. 2. 16.

◦ 옥룡천 옛물길 회복사업 편입토지 보상 추진 : 2014. 10. ~

▸토지 58필지(10,019㎡), 건물 25동 중 24필지(6,375㎡), 건물 9동 매입완료(63.6%)

◦ 2015년 시행계획 변경 승인(문화재청)             : 2015.  8. 13

▸기존제방구간 재포장, 기존교량 리모델링, 신규 탐방로, 천변공원 조성

◦ 옥룡천 기존제방구간 탐방로 재포장공사 설계승인 : 2015. 11. 26

◦ 옥룡천 기존제방구간 탐방로 재포장공사 추진    : 2016.  2. ~ 6.

□ 금 후 계 획

◦ 기존교량 리모델링 사업추진                      : 2016. 7. ~ 10.

◦ 신규 탐방로 및 천변공원 구간 공사추진          : 2016. 8. ~ 2017. 12.

4. 이주단지 조성사업 추진실적

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	고도육성계장		유원향	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2012. 7. ~ 2016. 12.

◦ 총사업비 : 7,700백만원(국비 5,390, 도비 1,155, 시비 1,155)

◦ 조성규모 : 23,881㎡ (택지 38필지, 공공용지 1필지)

◦ 사업내용 : 이주단지 부지 및 기반시설(도로, 상․하수도 등) 조성

□ 추 진 실 적

◦ 추진계획보고 및 공유재산관리계획 승인        : 2013. 4. ~ 2013. 5.

◦ 1차 이주대상자 주민공청회 추진               : 2013. 5. 14.

◦ 이주단지 조성사업구간 보상 추진              : 2013. 5. ~

▸편입토지 : 37필지 21,251㎡ / 건물10동

▸협의매입 : 29.5필지 18,898㎡ / 건물 7동 (88.9%)

◦ 이주단지 개발계획 수립 및 실시설계용역 시행  : 2013. 11. ~ 2014. 7.

◦ 이주단지 문화재 시·발굴조사 완료             : 2013. 12. ~ 2015. 2.

◦ 이주단지 조성공사 착공                       : 2015.  3. 2.

□ 금 후 계 획

◦ 미매입 토지 7필지 2,001㎡, 건물 3동 협의매입  : 2016.  6. ~

◦ 택지 분양가 산정 및 분양                     : 2016. 10.

◦ 공사 준공                                    : 2016. 12.

◦ 이주단지 내 고도이미지 찾기사업 시비(10억)확보 : 2016. 12.

5. 문화유산 보존정비 현황

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	문화재시설계장		배석희	□

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2015. 12.

◦ 총사업비(18건) : 2,980백만원 (국비 1,476  도비 767  시비 737)

구 분	내 용	사업비(백만원)	비 고
계	18건	2,980
국가지정문화재	왕궁리유적 정비 등 (7건)	2,020
도지정문화재	익산향교 대성전 정비 등 (8건)	780
기타사업	자명사 보수정비 등 (3건)	180

□ 추 진 실 적

◦ 국비 및 도비 보조사업 사업지침 확정             : 2015. 1.

◦ 문화재청 및 전북도 설계승인 추진                : 2015. 4. ~ 5.

◦ 추진상황

(단위 : 건)

구 분	건수	내 용
계	18
공사완료	17	구 삼산의원, 함라마을 옛담장, 고도리석조여래입상,숭림사보광전, 나바위성당,익산향교대성전, 여산향교대성전, 이병기선생생가, 미륵산성, 여산숲정이 순교성지, 성당면 은행나무, 조해영가옥, 김안균가옥, 백운사, 사자암, 용안자명사, 2015왕궁리유적 정비
계속사업 지속추진	1	제석사지 정비

◦ 보수정비시행 추진                               : 2015. 4. ~ 12.

□ 문화재 보수정비 사업

(단위 : 백만원)

구분	문 화 재 명 (사업명)	사업내용	사 업 비	추 진 사 항
				설계중	설계승인	공사중	완 료
계	18개 사업		2,980			1	17
국가지정문화재	7개 사업		2,020
	익산 중앙동 구 삼산의원 정비	지붕 보수	30				⚪
	익산 함라마을 옛 담장 정비	노후 담장 보수	35				⚪
	익산 고도리 석조여래입상 주변정비	탐방로 정비	25				⚪
	익산 숭림사 보광전 주변정비	배수로정비, 담장보수	30				⚪
	익산 나바위성당 정비	벽체 보수 등	100				⚪
	왕궁리유적 정비	서측궁장정비 및 배수시설정비	1,300				⚪
	제석사지 정비	문화재구역 토지매입	500			⚪
도지정문화재	8개 사업		780
	익산향교 대성전 정비	대성전 해체보수 및 흰개미 피해보수	300				⚪
	여산향교 대성전 정비	대성전 해체보수 및 흰개미 피해보수	180				⚪
	이병기선생생가 정비	초가이엉잇기	25				⚪
	미륵산성 정비	정상부 정비에 따른 발굴조사	100				⚪
	여산숲정이 순교성지 주변정비	토지매입및성토 등	50				⚪
	성당면 은행나무외 3개소 정비	유지관리 및 시비 등	5				⚪
	조해영가옥 정비	문간채 지붕보수등	30				⚪
	김안균가옥 정비	비각보수,화장실신축 등	90				⚪
기타	3개 사업		180
	백운사 보수정비	지붕 번와보수	90				⚪
	사자암 보수정비	종각단청	60				⚪
	용안 자명사 보수정비	진입로 옹벽설치	30				⚪

6. 익산 중요무형문화재 통합전수관 건립 추진실적

확인자	:	역사문화재과장		박광수	□
작성자	:	문화재시설계장		배석희	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 모현동 모인근린공원 일원 (김동문 배드민턴장 인접)

◦ 사업기간 : 2013 ~ 2016 (4년)

◦ 규    모 : 연면적 3,919.45㎡ (지상2층 지하1층)

▸제11-3호 이리농악, 제83-2호 이리향제줄풍류, 시립국악원(시립풍물단 포함) 통합 건축

◦ 사 업 비 : 8,200백만원 (국비 3,300, 도비 2,450, 시비 1,950, 특별교부세 500)

구분	계	2012	2013	2014	2015	2016
계	8,200	800	600	2,250	1,670	2,880
통 합 전수관	6,600 (국3,300 도1,650 시1,650)		600 (국300 도150 시150)	1,750 (국1,350 도200 시200)	1,370 (국500 도435 시435)	2,880 (국1,150 도865 시865)
시 립 국악원	1,600 (특별교부세500 도800 시300)	800 (도800)		500 (특별교부세 500)	300 (시300)

※ 당초 시립국악원과 이리농악+이리향제줄풍류 건립을 각각 추진중에 있었으나 통합하여 건립하는 것이 예산투자 및 공유재산 운영 측면에서 바람직함(익산시 투융자심사)

□ 추 진 실 적

◦ 전북도 지방재정투융자 심사완료                 : 2012.  7. 13.

◦ 의회 공유재산관리계획 승인                     : 2012. 12. 20.

◦ 건립 자문위원회 구성 및 운영                   : 2013.  3. ~ 12.

▸참여단체, 교수, 전문가 등으로 구성하여 의견수렴 및 거버넌스 구현

◦ 전통문화 랜드마크 건축을 위한 설계공모 추진    : 2013.  6. ~ 12.

◦ 전북도의 공사비 검토 및 문화재청 설계심사 완료 : 2014.  4. ~  6.

◦ 공사 착공                                      : 2014. 10.  8.

◦ 1차 계약분 준공(철근콘크리트 및 조적공사 등)    : 2015.  7. 29.

◦ 2차 계약분 준공(외부마감 및 기계설비 공사 등)   : 2015. 12. 15.

□ 금 후 계 획

◦ 3차분 공사 추진(내외부 마감공사 및 전통건축공사 등) : 2016. 1. ~ 8.