2016. 7.

제196회 익산시의회(정례회)

2016행정사무감사자료

	국가식품클러스터지원단

목     차

식품클러스터지원과	……………	3

식품클러스터지원과

	□		감사자료 공통사항
				1.	2015 업무성과 및 반성 ………………………	7
				2.	2015 예산집행 및 추진사항 …………………	8
				3.	2015 행정사무감사 지적사항에 대한 조치 결과 …	9
				4.	2015 상급기관 감사 지적사항 및 조치 결과 …	12
				5.	시정질문 조치 결과 ……………………………	12
				6.	주요사업 조서(3천만원 이상) ………………	12
				7.	2015 각종 민원(진정, 건의, 청원 등)접수 처리내역 …	14
				8.	기금 운용 관련 …………………………………	14
				9.	위원회(자문위원회 포함) 운영 관련 …………	14
				10.	용역사업 관련 ……………………………………	16
				11.	인․허가 민원처리 관련 ………………………	16
				12.	각종공사 설계 변경상황 ………………………	17
				13.	건설공사 집행 현황(3천만원이상) ……………	17
				14.	민간에 대한 보조금 집행 내역 ………………	17
				15.	국․도비 보조사업 집행현황(1억원이상) …	18
				16.	2015년도 명시 및 사고이월사업비 집행 내역 …	18
				17.	2016년도 명시이월 내역 ………………………	19
				18.	예산전용 사항 및 예비비 집행 현황 ……	19
				19.	공사 준공기한 연장 내역 ……………………	20
				20.	국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황 …	20
				21.	국․도비 반납 현황 ……………………………	20
				22.	2015 계획사업중 미착공사업 현황 …………	20
				23.	2015 계획사업중 유보 및 취소 사업현황 …	21
				24.	2015년도 이월사업중 유보 및 취소 사업현황 …	21
				25.	2015년도 예산편성후 전액 미집행 내역 ……	21
				26.	소송 사건 현황 …………………………………	21
				27.	시홈페이지 접수 민원처리 현황 ………………	22

	□		식품클러스터지원과 요구사항
				1.	국가식품클러스터 식품전문산업단지 조성		………	25
				2.	국가식품클러스터 기반시설 확충		………	26
				3.	국가식품클러스터 정부기업지원시설 구축		………	28
				4.	국가식품클러스터 배후복합도시 조성		………	29
				5.	국가식품클러스터 투자유치 및 교류협력		………	30
				6.	국가식품클러스터 외국인투자지역 지정		………	32
				7.	국가식품클러스터 투자유치 지원홍보		………	33
				8.	국가식품클러스터 MOU 체결 현황		………	34
				9.	국가식품클러스터 계약 현황		………	35
				10.	할랄식품 관련 현황		………	36
				11.	5분 발언에 대한 조치결과		………	37

감사자료 공통사항

1. 2015 업무성과 및 반성

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	국가식품계장		유 은 미	□

□ 성      과

◦ 국가식품클러스터 산업단지 조성공사 추진

▸ 산업단지 조성공사 추진(공정율 35%)

▸ 문화재 시굴‧발굴조사 추진

- 시굴조사 391천㎡ 완료 / 발굴조사 74천㎡ 중 40천㎡완료(54%)

▸ 지장물 이전 대책반 구성‧운영(전북도, 익산시, LH공사)

▸ 외국인투자지역(116천㎡) 지정‧고시(전북도, ‘15. 10. 12.)

◦ 정부기업지원시설 구축 및 기반시설 확충

▸ 정부기업지원시설 건축(공정율 68%)

▸ 진입도로 확장공사 착공(7%)	: ‘15.  2.

▸ 폐수종말처리시설 공사 착공(23%)	: ‘15.  4.

▸ 용수공급사업(송수관로) 착공(14%)	: ‘15. 10.

▸ 왕궁배수지 도시계획시설(수도공급설비, 도로) 결정 고시	: ‘15. 11. 20.

◦ 국내외 투자유치 및 교류협력 활동 전개

▸ 분양계약체결(6건) : 하림식품(1.7), 조은건강(1.7), 에이젯시스템(1.9),            원광제약(1.9), BTC(10.5), 네오크레마(12.29)

▸ 투자양해각서 체결(13건) : 에이젯시스템(1.6/국내), BTC(1.6/국내), Gold of             Prague a.s.(2.25/체코), BGX(3.30/중국), 네오크레마(10.19/국내) 등

▸ 업무양해각서 체결(7건) : 냉장냉동물류연합(2.2/중국), 한국 식품안전관리            인증원(8.20/국내), 독일맥주수출협회(10.10/독일) 등

▸ 외국인투자신고(2건) : 차오마마(2.10/중국), Gold of Prague a.s.(5.15/체코)

▸ 국내외 투자유치 홍보관 운영(12회) : 서울 국제식품산업대전(5월/국내),          동경식품소재박람회(5월/일본), 식품기술 박람회(7월/미국) 등

▸ 기업공동연구과제 수행(6건)                           : ‘15.  3.~12.

▸ 제5회 국제식품클러스터 포럼 개최                      : ‘15. 11. 17.

□ 반      성

◦ 적극적인 기업유치 활동으로 성공적인 국가식품클러스터의 조성을 위해 노력하겠음.

2. 2015 예산집행 및 추진사항

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	국가식품계장		유 은 미	□

【2015. 12. 31. 현재】                                              (단위 : 천원)

단위	세부사업	편 성 목	예산액	집행액	잔 액	비율	비고 (잔액사유)
계			74,608,336	35,126,727	39,481,610	47.08
식품클러스터지원과			74,608,336	35,126,727	39,481,610	47.08
국가식품클러스터			73,877,781	34,396,296	39,481,486	46.56
	국가식품클러스터사업		72,845,951	34,024,848	38,821,103	46.71
		식품클러스터사업	143,600	131,110	12,490	91.30
		홍보관운영	23,730	23,238	492	89.43
		국가식품클러스터투자유치	6,784,000	6,234,750	549,250	91.90	명시이월 80백만원
		국가식품클러스터 정부기업지원시설구축	61,395,621	23,136,750	38,258,871	37.68	명시이월 14,888백만원 사고이월 22,852백만원
		국가식품클러스터 폐수종말처리시설	4,499,000	4,499,000	0	100.00
	1시군1프로젝트		1,031,830	371,448	660,382	36.00
		식품전용산업단지 조성	1,031,830	371,448	660,382	36.00	사고이월 643백만원
재무활동			700,000	700,000	0	100.00
	내부거래지출		700,000	700,000	0	100.00
		내부거래지출	700,000	700,000	0	100.00
행정운영비			30,555	30,431	124	99.59
	기본경비		30,555	30,431	124	99.59
		기본경비	30,555	30,431	124	99.59

3. 2015 행정사무감사 지적사항 조치결과

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	국가식품계장		유 은 미	□

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과	비고
1	•투자양해각서 체결 관련 ▸집행부서에서 열심히 노력하여 156개 기업 및 연구소 등과 투자양해각서를 체결하였는데, 투자양해각서 체결시 기업에 특혜를 주지 않도록 업무추진에 만전을 기하기 바람.	▸투자양해각서 체결업체에 대한 자세한 자료는 업체 비밀유지를 위하여 공개가 어렵고, 체결업체에 대하여 별도의 혜택은 없음.
2	•국가식품클러스터내 할랄식품 인증 기업 입주 관련 ▸전세계 인구 중 약 16억명의 이슬람인들이 먹는 할랄식품의 생산기업들이 국가식품클러스터에 입주하는 것에 대하여 기독교 단체에서 반대한다는 여론이 있는데 잘 대응하길 바람. ▸할랄식품을 생산하는 기업이외의 이슬람 사원 등 이슬람 문명이 들어오면 익산의 또 다른 분쟁의 소지가 될 수 있으므로 할랄식품에 대해 정확히 파악 후 추진하기 바람.	▸이슬람 할랄식품은 세계 식품시장의 17~20%를 점유하고 있는데, 세계인이 먹는 식품으로서 할랄식품 업체를 한데 모아서 할랄푸드파크를 조성 한다는 계획임. ▸VIP의 중동방문 후속 조치로 추진중이며, 할랄제품을 비이슬람도 25%가량 소비하는 실정으로 막연한 우려를 불식할 수 있도록 대화로 해결하도록 하겠음. ※할랄식품관련 투자유치 활동은 할랄식품 수출이 확대되면 시민들의 공감대 형성 이후 신중 검토 추진
3	•투자유치 관련 ▸국가식품클러스터의 성공여부는 대기업들이 투자하고 입주해야만 성공할 수 있으므로 투자유치에 더욱 노력하기 바람.	▸현재 CJ, 동원F&B, 중국 차오마마 등 주요 업체와 협약 체결 및 ㈜하림 등과 분양계약 체결한 상황으로 더욱 노력하겠음.

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과	비고
4	•농생명 관련 우수인재 양성 관련 ▸익산의 우수인재들이 타지역으로 빠져나가지 않도록 농생명 관련 대학들과 연계하여 우수인재를 미리 교육하고 양성하기 바람.	▸혁신도시 농진청, 한식연 등의 입주로 대학에서는 관련학과를 개설하여 우수한 인력이 교육받을 수 있는 체계를 구축하고 있음.
5	•배후복합도시 조성 관련 ▸국가식품클러스터내 750세대의 주거 공간이 있지만 국가식품클러스터로 인한 인구증가 효과를 거양하기 위해서는 배후도시 조성이 시급함에도 배후도시 조성이 미진한 것으로 파악되는 바, LH와 적극적으로 협의하여 조속히 추진 하기 바람.	▸인구유발효과는 22천명 정도 예상하며, 본 사업의 가장 큰 목표는 인구증가 및 도시발전, 지역 우수 농산물의 판로개척임. 사업계획상 752세대 2,200명 수용가능한 공동 주거구역이 있고 이에 대한 분양은 완료한 상태로, 향후 산단용지 분양률 등 추이를 보고 준비할 계획임.
6	•지역업체 참여 확대 관련 ▸국가식품클러스터 조성에 타지역 업체들이 도급을 받아 시공하고 있는데, 하도급의 경우 지역업체 들이 참여할 수 있도록 행정에서 지원할 수 있는 부분은 적극 지원해 주기 바람.	▸자재, 일용직 등 인력을 관내 에서 사용하도록 LH공사를 통해 협조를 구하고 있고, 일부분 성과를 내고 있음.
7	•도시기반시설 확충 관련 ▸국가식품클러스터 배후복합도시가 지연되면 사회기반시설이 잘 되어 있는 인근 봉동이나 전주로 인구가 유출될 수 있으므로 익산 남부지역으로 연결되는 도로를 시급히 검토하기 바람.	▸산단 진입도로 확포장 계획이며, 도로관련 부서에 용강선 확장 협조 요청함.

연번	시정․개선사항	조치(처리)결과	비고
8	•농민소득증대 방안 마련 관련 ▸지역 농민들은 국가식품클러스터가 준공되고 기업들이 입주하여 제품을 생산하게 되면 지역농산물 판매가 증가될 것으로 기대하고 있는데, 행정에서 기업들이 요구하는 작물이 무엇인지 파악하여 지역 농민들이 미리 준비할 수 있도록 행정을 펼치기 바람. ▸국가식품클러스터 입주기업들에게 필요하다면 계약재배 방식 등을 통해서 라도 지역농산물을 이용할 수 있도록 적극적으로 협의하기 바람.	▸농업기술센터에서 T/F팀을 구성하여 국가식품클러스터 입주기업들이 요구하는 원료농산물 대표작물을 파악․준비 하고 있고, 이와 관련된 용역을 추진 중임. ▸쌀을 이용한 하림의 햇반, 조미료 생산 기업 등은 시장성을 내다보고 있으며, 향후 원료공급협약 체결 등이 필요할 것임.
9	•자문위원회 적극 활용 관련 ▸익산시 국가식품클러스터 자문위원회는 여러분야의 전문가들로 구성되었으니 자문위원들을 적극적으로 활용하기 바람. ▸자문위원회가 구성되었으나 2014년도에 한번도 개최되지 못했는데, 유명무실한 자문위원회가 되지 않도록 위원회를 적극 활용하기 바람.	▸사업초기에 다방면의 의견을 수렴하기 위하여 자문위원 구성을 전국으로 확대하여 운영하였음. 사업이 안정됨에 따라 운영횟수가 줄었고, 2015년 12월에 자문위원 회의를 개최하였으며, 2016년부터 농식품부 주관 하에 지자체, 학계, 연구계 및 협회․기업계로 국가식품클러스터 자문위원회를 구성 운영함.
10	•국도비 반납 관련 ▸농식품기업육성사업에서 삼화웰빙의 사업포기로 국비 3억원이 반납 되었는데, 업체선정을 잘못 하였다고 판단되는 바, 사업을 실제 실행할 수 있는 업체를 선정할 수 있도록 노력하기 바람.	▸사업선정시 자부담 능력이 확보 되었으나 경영 악화로 사업을 포기하였음. 추후 사업신청시 패널티가 있으며, 앞으로 사업대상자 선정시 심도 있게 검토하겠음.
11	•국가식품클러스터 홍보 관련 ▸홍보예산으로 12억원을 사용 하였는데 향후에는 홍보기준을 세워 일정 기준 이상의 언론사 및 업체에게 의뢰하여 홍보효과를 극대화하기 바람.	▸기준 이상의 언론사와 업체에 적정수준의 홍보비가 지출되도록 추진하겠으며, 최대한 홍보효과를 높이도록 하겠음.

4. 2015 상급기관 감사 지적사항 및 조치결과

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	국가식품계장		유 은 미	□

해 당 없 음

5. 시정질문 조치 결과

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	국가식품계장		유 은 미	□

해 당 없 음

6. 주요사업 조서 (3천만원 이상)

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	국가식품계장		유 은 미	□
작성자	:	유치홍보계장		김영범	□
작성자	:	지원협력계장		박갑수	□

(단위 : 천원)

사 업 명		사업 내용	사업비	집행액	잔액	추진사항
합 계			69,838,951	30,358,209	39,480,742
국가식품클러스터 투자유치	투자유치	소 계	1,177,000	1,000,000	177,000
		국내 식품기업 CEO대상 조찬간담회	40,000	0	40,000	□완 료
		국내 협력기관 운영	60,000	60,000	0
		국내 투자설명회 개최	50,000	30,000	20,000
		국내 사이트 투어	167,000	50,000	117,000
		해외 식품기업 방문	240,000	240,000	0
		해외 협력기관 운영	200,000	200,000	0
		투자유치홍보관 운영	420,000	420,000	0

사 업 명		사업 내용	사업비	집행액	잔액	추진사항
국가식품클러스터 투자유치	교류협력 (투자유치환경구축)	소 계	1,393,000	1,303,000	900,00
		국제식품클러스터포럼	175,000	175,000	0	□완 료
		이노베이션R&D네트워크 구축	55,000	55,000	0
		분양 입주지원 활동	45,000	45,000	0
		식품수출거점기지 구축방안 수립	75,000	75,000	0
		국가식품클러스터 글로벌 경쟁력 확보 방안 수립	63,000	63,000	0
		국가식품클러스터 정보화 전략 수립	130,000	80,000	50,000	□‘16 명시이월 (‘16. 3월 완료)
		기업공동연구	500,000	500,000	0	□완 료
		국제공동 R&D지원 사업	200,000	200,000	0
		국가식품클러스터 조성 평가서 제작	60,000	30,000	30,000	□‘16 명시이월 (‘16. 12월 완료)
						□완 료
		할랄푸드파크 개발방안을 위한 연구용역	90,000	80,000	10,000
	국내외 홍보	소 계	1,260,500	1,247,011	13,489
		국내홍보	435,500	429,444	6,056	□완 료
		해외홍보	334,000	334,000	0
		온라인홍보	260,000	260,000	0
		지역언론홍보	80,000	79,600	400
		홍보관 유지보수	50,000	43,340	6,660
		홍보물제작	101,000	100,627	373
지원센터운영		지원센터 운영	2,350,890	2,258,590	92,300	□완 료
임시연구소 운영		임시연구소 구축․운영사업	530,110	341,410	188,700	□완 료
국가식품클러스터 정부기업지원시설 구축		정부기업지원시설 건축 및 장비구축 ▸품질안전․기능성평가․패키징센터, Pilot Plant, 임대형공장, 지원센터 등 6개 H/W시설	61,395,621	23,136,750	38,258,871	□‘16 명시이월 □‘16 사고이월
1시군 1프로젝트		왕궁배수지 건설공사 용역 등	1,031,830	371,448	660,382	□‘16 사고이월
내부거래지출		왕궁배수지 건설공사	700,000	700,000	0	□완 료

7. 2015 각종 민원(진정.건의.청원 등) 접수 처리내역

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	지원협력계장		박갑수	□

민원종류	건명	요구내용	처리내용	비고
진정 (2015.7.3.)	국가식품클러스터 폐수종말처리장 및 오염빗물 저장시설 예정지 이전 요청 [진정인 : 궁평마을 (대표 홍지호)]	폐수종말처리장 및 오염빗물 저장시설을 현 위치에서 200~250m 위쪽으로 이전 설치 요청	○ 폐수종말처리시설 사업시행자인 LH공사에 궁평마을 주민들의 민원사항 전달 해결 - 폐수종말처리장은 피해 방지대책(처리시설의 지하화, 3단계 탈취설비 등)을 수립하여 공사 중

8. 기금 운용 관련

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	국가식품계장		유 은 미	□

해 당 없 음

9. 위원회(자문위원회 포함) 운영 관련

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	국가식품계장		유 은 미	□

▣ 위원회 설치현황

위원회명	설치근거	구성원수	심의․의결․자문 기능 여부	비고
익산시국가식품클러스터자문위원회	익산시국가식품클러스터 자문 위원회설치및운영에관한조례	32명 (고문4,위원28)	여	자문

※ 임기 : 2015. 5. 1. ~ 2017. 4. 30. (2년)

▣ 위원회 명단

구 분	소 속	성 명	구 분	소 속	성 명	구 분	소 속	성 명
고 문	국회의원	이 춘 석	위 원	원광대학교	이영은	위 원	군산대학교	장혜순
	국회의원	전 정 희		익산시의회	황호열
							디지털서울문화예술대학교	김미자
	익산시의회의장	조 규 대		이화여자대학교	조미숙
							고려대학교	이광원
	상공회의소	최 병 선		동양종합식품(주)	강상훈
위 원	계원예술대학교	이남식		원광대학교	김진병
							한국포장시스템연구소	이명훈
	전북생물산업진흥원	김동수		충북대학교	김향숙
							중앙대학교	이정희
	충남대학교	김미리		(주)푸르메	문점석
							우석대학교	정문웅
	전북연구원	김진석		전주대학교	신정규
							전북대학교	정용섭
	국립식량과학원	박기훈		한국식품정보원	이기표
							인천 정보산업진흥원	조성갑
	한국식품산업협회	이기식		우석대학교	이세연
							(주)다손	조은경
	(주)하림	이문용		원광대학교 산학협력단	이영미
							한국식품연구원	하태열

▣ 각종위원회의 운영예산과 실제 운영 횟수, 위원수당 지급내역, 불용예산현황

(단위 : 천원)

위 원 회 명	운영예산	실제운영횟수	위원수당 지급내역	불용예산현황
국가식품클러스터 자 문 위 원 회	1,400	1회	1,290	110

▣ 각종 위원회의에서 심의하여 단체장의 의견이 수정된 사례

해당없음

▣ 단체장이나 부기관장을 위원장으로 선임하고 있는 위원회 현황

해당없음

▣ 각종 위원회 예산현황 및 예산편성 기준

(단위 : 천원)

구 분	편성내용	산 출 기 초	편성액
국가식품클러스터 자 문 위 원 회	참석수당	70,000원 x 30명 x 2/3 x 1회	1,400

▣ 법령이나 조례의 근거없이 설치되어 있는 위원회 ․ 회의회수․ 및 소요예산(2015년 예산)

해당없음

10. 용역사업 관련

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	지원협력계장		박갑수	□

(단위: 천원)

구분	용 역 명	용역비	용역업체	용역기간	과 업 내 용	계약 방법
계	2건	491,031
기술 용역	왕궁배수지건설공사 기본 및 실시설계용역	435,030	㈜경호엔지니어링 종합건축사사무소 외 1	‘14.2～ ‘15.12	기본 및 실시설계	경쟁입찰
기술 용역	왕궁배수지건설공사 전략 및 소규모 환경영향평가용역	56,001	㈜범산	‘14.5～ ‘15.12	전략 및 소규모 환경영향평가	경쟁입찰

▣ 용역비 미집행 사업 추진 현황

해당없음

▣ 용역사업중 사전 기술심사시 참가자격 제한 사례

해당없음

▣ 각종 용역사업 중 사장된 미집행 용역현황(구체적 사유 및 내용)

해당없음

▣ 각종 용역사업중 사업 중단으로 인한 미적용 사례 현황

해당없음

11. 인․허가 민원처리 관련

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	국가식품계장		유 은 미	□

해 당 없 음

12. 각종공사 설계변경 상황

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	국가식품계장		유 은 미	□

해 당 없 음

13. 건설공사 집행 현황 (3천만원 이상)

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	국가식품계장		유 은 미	□

해 당 없 음

14. 민간에 대한 보조금 집행내역

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	국가식품계장		유 은 미	□
작성자	:	유치홍보계장		김영범	□
작성자	:	지원협력계장		박갑수	□

(단위 : 천원)

보조단체	보조사업명	세 목	집행액	보조금 지원근거
계	2개 사업		29,371,500
국가식품클러스터 지원센터	국가식품클러스터투자유치	민간경상보조	6,234,750	식품산업진흥법 제12조의2 (국가식품클러스터지원센터의 설립 등) 익산시보조금관리조례 제4조~8조
	국가식품클러스터 정부기업지원시설구축	민간자본보조	23,136,750

▣ 사업계획서 및 정산서 사본(별첨)

15. 국․도비 보조사업 집행현황 (1억원 이상)

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	국가식품계장		유 은 미	□
작성자	:	유치홍보계장		김영범	□
작성자	:	지원협력계장		박갑수	□

(단위 : 천원)

사 업 명	예산액	집 행 액				잔 액	비 고
		계	국 비	도 비	시 비
계	73,378,621	34,570,500	23,757,291	3,033,962	7,779,247	38,808,121
국가식품클러스터 투자유치	6,784,000	6,234,750	3,117,375	935,212	2,182,163	549,250	□잔액일부 명시이월
국가식품클러스터 정부기업지원시설구축	61,395,621	23,136,750	16,140,916	2,098,750	4,897,084	38,258,871	□잔액 명시이월, 사고이월
국가식품클러스터 폐수종말처리시설	4,499,000	4,499,000	4,499,000	0	0	0	□완료
내부거래지출	700,000	700,000	0	0	700,000	0	□완료

16. 2015년도 명시 및 사고이월사업비 집행내역

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	국가식품계장		박 갑 수	□

▣ 이월사업개요

(단위 : 천원)

구 분	건 수	이월액	집행액	잔 액	비 고
계	3건	47,539,451	23,508,198	24,031,253
명 시 이 월	2건	47,231,774	23,200,521	24,031,253
사 고 이 월	1건	307,677	307,677	0

▣ 명시이월사업 추진

(단위 : 천원)

사 업 명	이월액	집행액	잔 액	비 고
계 (2건)	47,231,774	23,200,521	24,031,253
국가식품클러스터 정부기업지원시설구축	46,507,621	23,136,750	23,370,871	□잔액 사고이월
식품전용산업단지 조성 (1시군1프로젝트)	724,153	63,771	660,382	□잔액 사고이월

▣ 사고이월사업 추진

(단위 : 천원)

사 업 명	이월액	집행액	잔 액	비 고
계 (1건)	307,677	307,677	0
식품전용산업단지 조성 (1시군1프로젝트)	307,677	307,677	0	□완 료

17. 2016년도 명시이월 내역

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	국가식품계장		유 은 미	□
작성자	:	지원협력계장		박갑수	□

(단위 : 천원)

사 업 명	명시이월액	명시이월사유	비 고
계 (2건)	14,968,000
국가식품클러스터 투자유치	80,000	국가식품클러스터 정보화전략 수립 및 국가식품클러스터 조성평가서 제작사업 지연(조성사업 준공시기 미도래)
국가식품클러스터 정부기업지원시설구축	14,888,000	사업준공시기 미도래

18. 예산전용 사항 및 예비비 집행 현황

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	국가식품계장		유 은 미	□

해 당 없 음

19. 공사 준공기한 연장 내역

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	국가식품계장		유 은 미	□

해 당 없 음

20. 국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	국가식품계장		유 은 미	□

해 당 없 음

21. 국․도비 반납 현황(2015년도 반납건)

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	국가식품계장		유 은 미	□

해 당 없 음

22. 2015 계획사업중 미착공 사업 현황

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	국가식품계장		유 은 미	□

해 당 없 음

23. 2015 계획사업중 유보 및 취소 사업현황

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	국가식품계장		유 은 미	□

해 당 없 음

24. 2015년도 이월사업중 유보 및 취소 사업현황

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	국가식품계장		유 은 미	□

해 당 없 음

25. 2015년도 예산편성 후 전액 미집행 내역

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	국가식품계장		유 은 미	□

해 당 없 음

26. 소송 사건 현황

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	국가식품계장		유 은 미	□

해 당 없 음

27. 시 홈페이지에 접수된 민원처리 현황

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	지원협력계장		박갑수	□

제 목	게시일	답변일	담당자	민원내용	답변내용	비고
계				7건
할랄음식단지조성 한다는데 사실입니까?	‘15.12.11.	‘15.12.18.	유수길	할랄식품단지 반대	농림축산식품부에서 정책 결정할 것으로 판단되며, 우리시에서는 기독교 단체 등 동향을 전달하여 종교적 갈등 발생되지 않도록 노력	시정에바란다
할랄식품에 관하여	‘15.12.12.	‘15.12.18.	유수길	할랄식품단지 반대	농림축산식품부에서 정책 결정할 것으로 판단되며, 우리시에서는 기독교 단체 등 동향을 전달하여 종교적 갈등 발생되지 않도록 노력	“
익산에 이슬람 할랄공장이 들어선다는게 사실입니까?	‘15.12.22.	‘15.12.24.	유수길	할랄식품단지 반대	농림축산식품부에서 정책 결정할 것으로 판단되며, 우리시에서는 기독교 단체 등 동향을 전달하여 종교적 갈등 발생되지 않도록 노력	“
할랄식품공장 들어오는거 확실한가요? 왜 무슬림들을 익산에!!	‘15.12.22.	‘15.12.24.	유수길	할랄식품단지 반대	농림축산식품부에서 정책 결정할 것으로 판단되며, 우리시에서는 기독교 단체 등 동향을 전달하여 종교적 갈등 발생되지 않도록 노력	“
할랄식품반대	‘15.12.23.	‘15.12.24.	유수길	할랄식품단지 반대	농림축산식품부에서 정책 결정할 것으로 판단되며, 우리시에서는 기독교 단체 등 동향을 전달하여 종교적 갈등 발생되지 않도록 노력	“
할랄식품	‘15.12.23.	‘15.12.24.	유수길	할랄식품단지 반대	농림축산식품부에서 정책 결정할 것으로 판단되며, 우리시에서는 기독교 단체 등 동향을 전달하여 종교적 갈등 발생되지 않도록 노력	“
할랄식품! 말도 안되는..	‘15.12.23.	‘15.12.24.	유수길	할랄식품단지 반대	농림축산식품부에서 정책 결정할 것으로 판단되며, 우리시에서는 기독교 단체 등 동향을 전달하여 종교적 갈등 발생되지 않도록 노력	“

식품클러스터지원과 요구사항

1. 국가식품클러스터 식품전문산업단지 조성

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	지원협력계장		박갑수	□

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2009 ~ 2016(8년간)

◦ 위    치 : 익산시 왕궁면 흥암리, 광암리, 동촌리 및 왕궁리 일원

◦ 총사업비 : 3,119억원(보상비 800, 공사비 2,119, 부대비 200)

◦ 사업내용 : 국가식품전문산업단지 조성 232만㎡(70만평)

▸ 산업시설용지(제조,연구,물류) 460천평, 상업용지 8천평, 주거용지 23천평

▸ 지원시설용지 27천평, 기반시설용지(도로,공원,폐수처리장 등) 182천평

◦ 사업시행자 : LH공사

□ 추진실적

◦ 국가식품클러스터 산업단지계획 승인 고시(국토부 제2012-354호)      : ‘12. 6. 29.

◦ 산업단지 1공구/2․3공구 조성공사 추진          : ‘14. 3. ~ / ‘14. 6. ~

▸ 공정율 35%(1공구 62.3%, 2공구 42.5%, 3공구 20.0%)

◦ 문화재 시굴․발굴조사 추진	: ‘14. 5. ~

▸ 시굴조사 391천㎡ 완료, 발굴조사 74천㎡ 중 40천㎡완료(54%)

◦ 지장물 이전 대책반 구성 및 운영	: ‘15. 2. ~

▸ 전북도․익산시․LH공사 합동 구성(지장물소유자 114명중 111명 이전 완료)

◦ 외국인투자지역 지정․고시(116천㎡)                     : ‘15. 10. 12.

◦ 산업단지 분양(2차)                                    : ‘16. 5.

□ 금후계획

◦ 문화재 발굴조사 완료	: ‘16. 7.      ◦ 산업단지 분양(3차)                                     : ‘16. 하반기

▸ 입주심사 및 입주계약 체결(한국산업단지공단)

▸ 산업단지 분양계약 체결(LH공사 전북본부 판매부)

◦ 산업단지 조성공사 준공	: ’16. 12.

2. 국가식품클러스터 기반시설 확충

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	지원협력계장		박갑수	□

□ 사업개요

(단위 : 억원)

구 분	시설규모	사 업 비				예산 확보액			관리부처 (사업시행자)
		합계	국비	지방비	민자	‘15년까지	‘16년	‘17년이후
합 계		1,088	686	84	318	국 비 322 지방비 23 민 자 64	국 비 194 지방비 61 민 자 138	국 비 170 지방비 0 민 자 116
진입도로	L=4.1km, 4~6차선	426	426	-	-	국 비 259	국 비 65	국 비 102	국토교통부 (익산국토청)
용수공급 시 설	송수관로 D=600, L=10.5km 배수지 Q=8.8천㎥/일 배수관로 D=500, L=1.5km	205	36	84	85	국 비 13 지방비 23 수 공 32	국 비 23 지방비 61 수 공 42	국 비 0 지방비 0 수 공 11	송수관로 (수자원공사) 배수지 (익산시) 배수관로 (LH,익산시)
폐수종말 처리시설	Q=10천㎥/일	350	224	-	126	국 비 50 LH공사 28	국 비 106 LH공사 65	국 비 68 LH공사 33	LH공사
전 기	6만KW/h (6회선, 20년말까지)	60	-	-	60	-	한전 20	한전 40	한국전력공사
도시가스	1.3km (D150~250, 1단계)	40	-	-	40	민자 4	민자 8	민자 28	전북에너지 서비스
통 신		7	-	-	7	-	민자 3	민자 4	KT 등 통신사업자

□ 추진실적

◦ 진입도로(익산지방국토관리청)

▸ 진입도로 토지보상 및 업체선정․착공(익산국토관리청)   : ‘15. 1. ~

- 시공사 : 백선건설(주) 외 1개사 / 감리단 : (주)신명건설기술공사 외 1개사

- 토지보상 추진(보상율 96%)

ㅇ 보상총액 : 85.5억원(집행액 82억)

ㅇ 보상대상   * 평가기관(2개사) : 제일감정평가법인, 나라감정평가법인

구 분	계	토지 (필지)	지 장 물 (건)				비고
			계	주유소	가 옥	분 묘
전체	293	239	54	2	5	47
보상	269	220	49	2	5	42
실적	92%	92%	91%	100%	100%	89%

ㅇ 토지수용 신청 : 2015. 5. 20. / 토지수용 공탁 : 2015. 10. 13.

◦ 용수공급시설(익산시, 수자원공사)

▸ 왕궁배수지 송수관로 실시설계용역 추진(수자원공사)	: ‘14. 2.~‘15. 5.

▸ 왕궁배수지 건설공사 기본 및 실시설계용역 (익산시)         : ‘14. 2.~‘15. 12.

▸ 왕궁배수지 송수관로 공사 착공(수자원공사)           : ‘15. 10.

- 시공사 : 세움종합건설㈜

▸ 왕궁배수지 건설공사 도시계획시설 결정 고시(익산시)    : ‘15. 11.

▸ 왕궁배수지 건설공사 보상 착수(익산시)	: ‘15. 12.

◦ 폐수종말처리시설(LH공사)

▸ 폐수종말처리시설 건설공사 착공(LH공사)	: ‘15.  4.

- 설계ㆍ시공사 : 코오롱건설 외 1개사

□ 금후계획

◦ 용수공급시설(익산시, 수자원공사)

▸ 왕궁배수지 송수관로공사 준공(수자원공사)	: ‘16. 12.

▸ 왕궁배수지 건설공사 준공(상수도과)	: ‘17.  4.

- 시공사 : 자일건설㈜

◦ 폐수종말처리시설(LH공사)

▸ 폐수종말처리시설 공사 준공(1단계)	: ‘17.  6.

◦ 진입도로(익산지방국토관리청)

▸ 국가식품클러스터 진입도로공사 준공	: ‘19. 12.

3. 국가식품클러스터 정부기업지원시설 구축

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	지원협력계장		박갑수	□

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2009 ~ 2020년

◦ 위    치 : 국가식품클러스터 산업단지내 S1 부지

◦ 총사업비 : 2,416억원(국비 1,616, 지방비 634, 민자 166)

(단위 : 백만원)

구 분	소요액	예산 확보액				비고
		합계	‘15년까지	‘16년	‘17년이후
합 계	241,600	241,600	79,295	18,320	143,985
건축비	66,200	66,200	61,392	3,514	1,294
장비비	41,000	41,000	17,903	9,000	14,097
운영비	51,600	51,600	-	3,200	48,400
S/W사업	82,800	82,800	-	2,606	80,194

◦ 사업내용

▸ 6개 H/W시설 건축(부지 52,675㎡, 연면적 28,705㎡, 건축면적 14,168㎡-지하1층, 지상5층)

- 국가식품클러스터지원센터, 기능성평가센터, 품질안전센터, 패키징센터, 파일럿플랜트, 임대형공장

▸ 10개 S/W사업(식품상품화 R&D지원, 기능성식품 개발․육성 및 인력양성 등)

▸ 장비구축(571종, 410억원)

◦ 보조사업자 : 국가식품클러스터지원센터

□ 추진실적

◦ 정부기업지원시설 공사추진(공정률 68%)                : ‘14. 5. ~

▸ 기초 철근․콘크리트타설 및 골조공사(기능성평가, 품질안전, 패키징센터 등)

◦ 정부기업지원시설 임시연구소 운영 및 장비 구축        : ‘14. 10 ~

▸ 임시연구소(2개소) 운영 - 원광대, 전북대 익산캠퍼스

▸ 158종(60억원) 장비구축 – 원광대(83종, 30억원), 전북대(75종, 30억원)

□ 금후계획

◦ 정부기업지원시설 임시연구소 장비 구축               : ‘16.  6. ~

◦ 정부기업지원시설 공사 준공	: ‘16.  9.

◦ 국가식품클러스터지원센터 이전 및 운영                  : ‘16.  9. ~

4. 국가식품클러스터 배후복합도시 조성

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	지원협력계장		박갑수	□

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2014 ~ 2019년(6년)

◦ 위    치 : 국가식품클러스터 산업단지 인근

◦ 총사업비 : 2,503억원(보상비 732, 공사비 1,431, 기타 340)

▸ 민자사업 추진(LH공사 등)

◦ 사업내용 : 배후복합도시 조성 119만㎡(36만평)

▸ 한옥단지, 외국인 맞춤형 주거단지 및 체험관․박물관 등

◦ 개발방식 : 도시개발사업

□ 추진실적

◦ 국가식품클러스터 종합개발계획 발표(농림축산식품부)  : ‘12. 7. 27.

◦ 정주여건 기본구상 용역 추진(국가식품클러스터지원센터)   : ‘12. 10. ~ ‘13. 3.

◦ 정주여건 기본구상 용역 성과품 제출(지원센터→익산시)   : ‘13. 5. 13.

◦ 사업참여 요청(익산시→LH공사, 전북개발공사 등)   : ‘13. 5. ~

□ 쟁점 및 애로사항

◦ LH공사는 ‘10년 재정악화 이후 재정건전성 회복으로 신규사업 모색 중

⇒ 국가식품클러스터 배후도시는 사업성 확보가 어렵다는 의견

▸ 우리시는 사업성 확보가 가능한 사업과 연계하여 배후도시를 단계적으로 개발하는 방안을 검토 중

▸ 이주단지(공동주택 752세대 2,200명) 입주가능

□ 금후계획

◦ 배후복합도시 건설사업 사업시행자 선정을 위한 관계기관 참여 유도

▸ LH공사, 전북개발공사, 한국농어촌공사 등에 개발 위․수탁 협의

◦ 사업시행자 선정 후 추진방안 수립(조성 가능한 면적 등)

5. 국가식품클러스터 투자유치 및 교류협력

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	국가식품계장		유 은 미	□
작성자	:	유치홍보계장		김영범	□

□ 사업개요

◦ 사 업 비 : 5,494백만원(국비 2,747, 도비 824, 시비 1,923)

◦ 사업내용

▸ 국내외 협력기관 및 투자유치관 운영 등을 통한 투자유치 효과 극대화

▸ 국내외 기업유치를 위한 제반활동 및 지속적 투자유치 관리

◦ 보조사업자 : 국가식품클러스터지원센터

□ 추진실적

◦투자유치 활동                                   : ‘15. 1. ~ ‘15. 12.

▸ 분양계약체결(6건) : 하림식품(1.7), 조은건강(1.7), 에이젯시스템(1.9), 원광  제약(1.9), BTC(10.5), 네오크레마(12.29)

▸ 투자양해각서 체결(13건) : (국내10건) 에이젯시스템, BTC, 네오크레마, 대영특운, 케이푸드, 청학F&B 등, (해외3건) 프라하의골드, BGX, GC FOOD

▸ 업무양해각서 체결(7건) : 냉장냉동물류연합(2.2/중국), 한국 식품안전관리              인증원(8.20/국내), 독일맥주수출협회(10.10/독일) 등

▸ 외국인 투자신고(2건) : 차오마마(중국), 프라하의골드(체코)

▸ 식품기업방문(198회) : (국내179회) 네오크레마, 제네럴네이쳐, BTC 등

(해외19회) : 프랑스 벨그룹, 중국 차오마마, 광략그룹, 싱가포르 통식푸드, 일본 DNP, 미국 위스콘신주정부 등

▸ 국내 투자설명회(5회) : 한국전통가공식품협회, 세계한상대회 등

▸ 협력기관 운영(8개) : (국내2개)서울국제식품산업대전 등 식품기업   박람회 지원 및 DB구축, (해외6개)중국, 일본, 유럽, 아시아권역 전문 네트워크 활용 투자유치관 초청 활동 지원 및 DB구축

▸ 국내기업 사이트투어 운영(14회) : (국내4회)나래식품, 경북대포도마을, 서울대CEO과정 등, (해외10회)Hampton Grains, BGX, 프라하의골드, GC FOOD, 광동성 식품기업 등

◦ 투자유치홍보관 운영                            : ‘15. 3. ~ ‘15. 12.

▸ 국내외 투자유치홍보관 운영(12회) : 일본 동경식품소재전, 미국 식품기술박람회, 터키 이스탄불식품박람회, 독일 Anuga 2015 식품박람회, 서울국제식품 산업대전, 2015 대한민국식품대전 등

◦ 투자유치 교류협력	: ‘15. 3. ~ ‘15.12.

▸ 투자유치 관계기관협의회 운영(7회) : 국가식품클러스터 투자유치 내부역량 강화

▸ 제5회 국제식품클러스터 포럼 개최(‘15. 11. 17.) : 국가식품클러스터의 국․내외 식품기업간 교류 협력의 장 마련

◦ 기업공동연구과제 수행                         : ‘15. 3. ~ ‘15.12.

▸ 공모를 통한 기업과 지원센터간 공동연구과제 수행(6건)

- 품질안전공동과제 수행(2건) : 레오스푸드(물성연구), 대상(장류품질기준 정립)

- 기능성평가(2건) : BTC(돌외 추출물), 월드웨이(실크단백질)

- 식품패키징(2건) : CJ제일제당(갈변 방지), 태방파텍(즉석식품 자동증기배출 포장)

◦ 투자유치 환경구축	: ‘15. 3. ~ ‘15.12.

▸ 분양입주 지원활동(분양 설명회 3회, 간담회 2회 등)

▸ 기업지원컨설팅(분양기업 및 잠재기업 대상 77건 자문)

▸ 식품수출 거점기지 구축방안 수립 용역 1회

▸ 국가식품클러스터 글로벌 경쟁력 확보방안 수립 용역 1회

□ 금후계획

◦ 국내․외 투자유치 및 교류협력 활동 지속 전개

▸ 국내기업 사이트투어 운영, 투자설명회 및 투자유치홍보관 운영 등

▸ 제6회 국가식품클러스터 포럼 개최            : ‘16. 11.

6. 국가식품클러스터 외국인투자지역 지정

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	국가식품계장		유은미	□

□ 사업개요

◦ 위    치 : 국가식품클러스터 산업단지 내

◦ 사 업 비 : 17,947백만원(국비 10,768, 도비 2,154, 시비 5,025)

◦ 규    모 : 116,000㎡(35천평) * 추후 입주수요 등을 고려하여 확장 예정

◦ 운    영 : 산업부, 전라북도 및 익산시가 부지 공동매입하여 외국기업에 임대

◦ 관리위탁 : 한국산업단지공단

▸ 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2015년 이전	2016년			2017년	2018년 이후
			소계	확보	미확보
계	17,947		10,567	9,179	1,388	7,380
국 비	10,768		6,258	6,258	-	4,510
도 비	2,154		1,293	1,293	-	861
시 비	5,025		3,016	1,628	1,388	2,009

※ ‘16년 시비 미확보액(1,388백만원) ’17년 본예산 확보

□ 추진실적

◦ 외투지역 지정 심의요청(전북도→산업부)             : ‘14. 12. 24.

◦ 산업부, 자료 보완후 외투지역 지정 再요청             : ‘15.  6.  9.

◦ 외투지역 지정관련 면적·위치·필지 등 변경확정       : ‘15.  7. 22.

(당초 210,064㎡ ⇒ 변경 116,000㎡)

◦ 외투지역 지정승인(산업부→전북도) 및 고시(전북도)       : ‘15. 10. 12.

◦ 토지 매매계약(LH공사↔산업부·전북도·익산시)      : ‘15. 11. 19.

◦ 관리 위·수탁계약(산단공↔산업부·전북도·익산시)      : ‘15. 12. 18.

◦ 산업부, 관리기본계획 승인                         : ‘16. 1. 8.

◦ 외국인투자지역 용지매매 계약금 납부(627,900천원)     : ‘16.  2. 15.

□ 금 후 계 획

◦ 입주기업 계약 체결                                 : ‘16.  8.~

7. 국가식품클러스터 투자유치 지원홍보

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	유치홍보계장		김영범	□

□ 사업개요

◦ 사 업 비 : 1,290백만원(국비 645 도비 193.5, 시비 451.5)

◦ 사업내용 : 투자유치와 연계한 전략적 국·내외 홍보 활동

◦ 보조사업자 : 국가식품클러스터지원센터

□ 추진실적

◦ 국내홍보 추진                                  : ‘15. 4. ~ ‘15. 12.

▸ 특집기사 게재 : 코리아타임스,아주경제,중앙일보,세계일보

▸ 국내기자 간담회 및 광고제작

▸ 옥외광고 : KTX, 인천공항, 옥외(강남)

▸ R&D홍보 : 한국포장학회, 한국영양학회, 한국식품과학회, 한국식품영양과학회,                      한국식품위행안전성학회

▸ 지면 및 배너광고 : 소비자TV, 월간닭고기, 농우소식, 식품연감, 앱광고

◦ 해외홍보 추진                                  : ‘15. 4. ~ ‘15. 12.

▸ 해외홍보 용역 : 외신기자 초청 팸투어(8개국 10명), 외신기자 간담회 개최

▸ 해외방송 광고 : 아리랑tv

◦ 기타 홍보활동                                  : ‘15. 4. ~ ‘15. 12.

▸ 온라인 홍보 :  홈페이지유지보수, 블로그, SNS홍보 등

▸ CI해외등록(중국), 검색엔진 최적화 및 웨비나

▸ 지역홍보 : 지역신문 배너 홍보

▸ 홍보관 유지보수 : 홍보관 주변 제초작업, 유지보수 공사, 물품구매 등

▸ 홍보물 제작 등 : 브로슈어 및 리플릿 제작, 기념품 구매 등

□ 금후계획

◦ 국내․외 홍보 추진

▸ 주요일간지 특집기사 게재, 옥외광고 및 홈페이지 운영 등 온․오프라인 홍보

8. 국가식품클러스터 MOU체결 현황

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	유치홍보계장		김영범	□

□ 사업내용

◦ 성공적인 국가식품클러스터 조성을 위하여 국내외 식품기업․기관 등과 MOU 체결

□ 추진실적

◦ 총괄현황

(‘15. 12. 31. 현재)

구 분	총 계			투자양해각서			업무양해각서
	계	국내	해외	소계	국내	해외	소계	국내	해외
계	170	82	88	116	64	52	54	18	36
기 업 체	109	60	49	106	60	46	3	-	3
연 구 소	17	6	11	10	4	6	7	2	5
기관․협회	44	16	28	-	-	-	44	16	28

◦ 투자양해각서 체결 현황(‘15년) : 13건(국내10 / 해외 3)

순번	기 업 명	일 자	투자규모			비고
			면적(㎡)	금액(억원)	고용(명)
	계		141,586	1,777	370
1	에이젯시스템	‘15.1.6.	11,000	20	40	국내
2	BTC	‘15.1.6.	10,000	200	30	〃
3	프라하의골드	‘15.2.25.	10,000	77	30	체코
4	BGX(윤항그룹)	‘15.3.30.	60,000	1,103	미정	중국
5	(유)한옥푸드	‘15.4.13.	4,626	20	미정	국내
6	GC FOOD	‘15.7.23.	5,000	12	100	베트남
7	네오크레마	‘15.10.19.	9,917	100	미정	국내
8	(유)대영특운	‘15.10.19.	9,917	미정	미정	〃
9	(주)별채에프앤비	‘15.10.19.	4,626	20	미정	〃
10	하루의 아침	‘15.10.19.	7,000	200	100	〃
11	(주)명화외식산업	‘15.12.29.	3,600	10	30	〃
12	(주)케이푸드	‘15.12.29.	3,300	10	10	〃
13	(주)청학F&B	‘15.12.29.	2,600	5	30	〃

◦ 업무양해각서 체결 현황(‘15년) : 7건(국내2 / 해외5)

▸ 냉장냉동물류연합(2.2/중국), 연태시인민대외우호협회(6.8/중국), 한국 식품 안전관리인증원(8.20/국내), 원광대학교(9.11/국내), 독일맥주수출 협회(10.10/독일), 독일요리식품협회(10.13/독일), 프라운호퍼IVV(11.17/독일)

9. 국가식품클러스터 계약 현황

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	유치홍보계장		김영범	□

□ 분양계약 및 외투신고 실적

◦ 분양계약 체결 : 6건

▸ 1차 분양 : 총 39필지(340천㎡)

▸ 분양계약 : 6개 기업, 15필지(108천㎡), 분양률 32%(1차 분양면적대비)

(‘15. 12. 31. 현재)

연번	기업명	입주계약 체 결 일	분양면적 (㎡)	금액 (억원)	고용인력 (명)	사업분야
	계		108,121	167	500
1	하림식품	‘15. 1. 7.	53,623	83	250	곡물가공, 면류
2	조은건강	‘15. 1. 7.	8,748	14	30	건강기능식품
3	원광제약	‘15. 1. 9.	4,629	7	150	건강기능식품
4	에이젯시스템	‘15. 1. 9.	11,297	17	40	소시지, 돈가스 등
5	BTC	‘15. 10. 5.	20,224	31	30	건강기능식품 (발효홍삼)
6	네오크레마	‘15. 12. 23.	9,600	15	미정	건강기능식품 (당 개선제)

◦ 외국인투자 신고 : 2건

(‘15. 12. 31. 현재)

연번	기업명	국가	외국인투자 신 고 일	면적 (㎡)	금액 (만$)	고용인력 (명)	사업분야
	계			43,000	210	35
1	차오마마	중국	‘15. 2. 10.	33,000	10	10	음료, 푸딩, 젤리
2	프라하골드	체코	‘15. 5. 15.	10,000	200	25	발효맥주

10. 할랄식품 관련 현황

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	지원협력계장		박 갑 수	□

□ 현 황

◦ 세계 이슬람 인구 : 17억명(세계인구의 23.2% - ‘14년 기준)

▸ 할랄 식품시장 규모는 2018년 1조 6,260억$ 성장 예상

◦ 국내 식품기업 할랄인증 현황

▸ 인증품목 : 120개 업체, 430개 품목

▸ 관련기업 및 품목 : 농심(컵라면 등), 남양유업(우유, 분유, 커피 등), 오리온 (초코파이 등), 종가집(김치 등), 대상(미역 등), 풀무원(라면 등), CJ제일제당(김치, 김밥 등) 등

□ 추진실적

◦ 한·UAE간 농업 및 할랄식품 협력 MOU 체결         : ‘15.  3.  5.

◦ 농식품부 및 한국식품연구원 할랄식품 사업단 출범    : ‘15.  3. 12.

◦ 할랄식품산업 육성 방침 발표                        : ‘15.  6. 29.

◦ 할랄식품단지 반대 집회                             : ‘15. 11. 23.

▸ 장    소 : 시청, 홍보관, 현장

▸ 참여인원 : 30여명(대한민국을 사랑하는 시민들의 모임)

◦ 할랄식품단지 반대 집회                             : ‘15. 12. 17.

▸ 장    소 : 시청, 홍보관, 성광교회

▸ 참여인원 : 120여명(31개 공동체) *기독교연합회 및 할랄식품반대전국대책위원회

□ 금후계획

◦ 현재 식품클러스터내 할랄식품구역 지정 계획은 없으며, 수요가 있을 경우라도 시민들의 공감대 형성 이후 신중 검토 추진

▸ 국내 할랄식품 수출기업 및 관심기업 대상 입주수요 조사결과, 입주수요가 크지 않은 것으로 조사됨 (3개사, 1,250평)

11. 5분 발언에 대한 조치결과

확인자	:	식품클러스터지원과장		임한경	□
작성자	:	지원협력계장		박 갑 수	□

일 자	발언 내용	조치(처리)결과	비고
2015. 11.30. (김용균 의원)	•국가식품클러스터 산업단지 조성시 입주기업 고용인력이 거주할 수 있는 주거용지 개발 방안 ▸국가식품클러스터가 2016년 준공되면 150개 기업과 10여개 연구소 입주 예정 및 인구유입이 예상되는데, 산단내 주거용지 2만3천평으로는 수용이 부족하여 완주군 과학산단내 주거부지, 백제예술 대학교의 아파트 단지 및 완주 테크노밸리 주거용지로 인구누수가 예상됨. 국가식품클러스터 배후도시 조성이 시급하다고 판단되므로 조속히 추진하기 바람.	▸인구유발효과는 2만2천명 정도 예상함. 사업계획상 752세대 2,200명 수용 가능한 이주단지(공동주택)를 계획중임. ▸우리시는 사업성 확보가 가능한 사업과 연계하여 배후도시를 단계적으로 개발하는 방안을 검토중임.	190회 (1차본회의)