건설과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2016 예 산 집 행 실 적
□	2016 주요업무성과
□	2016 주 요 업 무 추진상황

건설과 비전 및 중점추진방향

	목 표
아름답고 깨끗한 녹색도시 건설

		중 점 추 진 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	시민에게 다가서는 보상행정으로 양질의 서비스를 제공 도·농균형발전 및 거점개발 추진을 위한 도로시설 확충 환경을 우선으로 하는 생태하천조성으로 시민휴식공간 제공 장애인과 여성들을 배려한 시민중심의 밝고 안전한 거리조성

일   반   현   황

□ 기       구

											건 설 과
건설행정								도로시설					하천시설				하천관리							가로등관리

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별							비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	계약
정 원	22		1	6	10	3	2
현 원	22		1	6	8	5	2
증 감					△2	2

□ 사 무 분 장

◦건설행정  : 국 소관사업 및 유관기관 용지매입, 토지수용 재결,

소유권이전 촉탁 등기, 기타 보상관련업무전반

◦도로시설  : 철도건널목 개량사업, 고속국도, 국도, 지방도 등 사업

관련협의 시․군도, 농어촌도로 확․포장사업 추진.

◦하천시설  : 하천 기본계획 수립, 지방하천 개량사업, 소하천 정비사업

◦하천관리  : 하천제방관리, 골재채취허가, 하천사용료 징수부과, 생태하천관리

◦가로등관리  : 가로등․보안등 시설 종합계획, 유지보수관리, 생활민원.

□ 하 천 현 황

(단위:km)

구 분	총 연 장		하천정비기본계획수 립 현 황		정비대상	개수연장	미개수 연 장	개수율
	개 소	연 장	개 소	연 장
합 계	92	324.673	85	305.673	324.673	134.729	189.944	41%
국가하천	3	34.2	3	34.2	34.2	34.2		100%
지방하천	27	188.27	20	169.27	188.27	73.36	114.91	39%
소 하 천	62	102.203	62	102.203	102.203	27.169	75.034	27%

□ 하 천 점 용 허 가 현황(2016년)

필 지 수				면 적(㎡)
계	답	전	대지	계	답	전	대지
1,358	996	323	73	1,468,093	1,188,878	265,485	13,730

□ 가로등․보안등 현황

계	보 안 등	가 로 등
27,788등	18,410등	9,378등

□ 차량보유현황

가로등유지보수차량	하천관리차량
고가사다리차 3대	91러7428 더블캡 1대, 오토바이 1대

2016 예산집행실적

【 2016. 10.07. 현재 】※(본예산11,490백만원,이월3,851백만원, 추경성립전115백만원)   (단위: 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
건설과				14,085,588	10,670,219	3,415,369	75.75
	도로시설관리			8,547,949	6,825,625	1,722,324	38.7
		시·군도농어촌도로확·포장		4,369,667	4,167,026	202,641	42.1
			함라수동-금곡간 도로확·포장	308,248	294,577	13,671	95.6%	사고이월
			용동 삼정-두무간 도로확·포장	288,593	270,535	18,058	93.7%	명시이월
			미불용지 매입비 (시군도농어촌도로)	382,474	370,712	11,762	96.9%
			여산신리호월간도로확포장공사	512,189	450,027	62,162	87.9%	명시이월
			부사관학교~상옥마을간교행장소설치	100,000	93,808	6,192	93.8%
			오산북영선(금몽-남전 도로확포장	698,615	698,523	92	99.9%	명시이월
			성당삼회선(성당우회도로)확포장	723,606	708,274	15,332	97.9%	명시이월
			시.군농어촌도로확포장사업추진	3,000	2,500	500	83.3%
			군도23호선도로확포장공사	1,100,000	1,093,479	6,521	99.4%
			춘포학연익산천제방간도로확포장공사	150,000	91,909	58,091	61.3%
			함영용성철도건널목입체화사업	102,942	92,682	10,260	90.0%	명시이월
		주민숙원사업		39,640	34,094	5,546	86.0%
			국내여비	38,640	33,260	5,380	86.0%
			시책추진업무추진비	1,000	834	166	83.4%
		철도건널목입체화사업		1,000,000	497,000	503,000	49.7%
		도로조명시설관리		3,138,642	2,127,505	1,011,137	67.7
			보안등신규설치	405,364	171,788	233,576	42.3
			노후가로등정비	175,580	119,384	56,196	68.0
			가로등,보안등 유지관리	2,515,038	1,826,003	689,035	72.6
			가로등보수차량 운영유지비	18,660	10,330	8,330	55.3

2016 예산집행실적

【 2016. 5. 31. 현재 】 ※(본예산13,155백만원,이월1,557백만원, 추경성립전48백만원)   (단위: 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
	하천정비			5,424,695	3,744,993	1,679,702	69.0%
		하천정비 및 유지관리		5,424,695	3,744,993	1,679,702	69.0%
			하천제방유지 보수(자체)	470,951	237,754	233,197	50.5%	명시이월
			하천제방유지보수	72,671	65,772	6,899	90.5%	명시이월
			소하천정비	3,244,908	3,064,209	180,699	94.4%	명시이월
			국가하천유지관리	608,000	232,810	375,190	38.3%
			국가하천유치관리 (4대강외)	115,000	40,799	74,201	35.5%
			왕궁천하천환경정비사업	778,426	68,910	709,516	8.9%	계속비 이월
			지방하천기본계획	34,739	34,739	0	100%	명시이월
			지방천하천정비	100,000	0	100,000	0%	명시이월
	재무활동(보전지출)			50,000	50,000	0	100%
	행정운영경비			62,944	49,601	13,343	79%
			인력운영비	35,000	23,922	11,078	68.3%
			기본경비	27,944	25,679	2,265	91.9%

2016 주요 성과

□ 성      과

◦ 건설공사 편입용지 협의보상으로 공익사업 추진에 기여

▸ 사업지구 42개소(계속사업 38개소,신규사업 4개소) 73% 협의 완료

▸ 외산천 소하천 정비공사 등 6개소 미협의자 수용재결 및 공탁완료

◦ 평화육교를 재가설하여 호남선 KTX 완전개통과 안전한                    교통망구축

▸ 평화육교 재가설에 따른 한국철도시설공단과 협약서 체결, 설계용역 착수 및 추진

◦ 농어촌도로 확포장으로 차량통행 불편해소 및 기계화 영농기반 구축으로 주민편익 증대(3개노선 준공)

▸ 여산 신리~호월간 도로확포장공사

- 도로확포장 L=1.4㎞, B=8.0m

- 도로확포장 준공 및 개통                    : 2016. 6. 22

▸ 함라 수동~금곡간 도로확포장공사

- 도로확포장 L=1.11㎞, B=8.0m

- 도로확포장 준공 및 개통                    : 2016. 6. 22

▸ 성당 삼회선 도로확포장공사

- 도로확포장 L=1.38㎞, B=8.0m

- 도로확포장 준공 및 개통                    : 2016. 7. 29

◦ 자연과 생명이 살아 숨쉬는 친환경을 우선으로 하는 하천               정비로 재해예방 및 시민 친수공간 조성

▸ 왕궁천 하천환경정비사업

- 하천정비 L=9.25㎞(제방축조 및 보축,교량가설등)

- 실시설계 추진(공정율 70%)

▸ 소하천 정비사업

- 오동정천 : 교량 1개소 설치, 호안정비 250m정비(공정율 85%)

- 외산천 : 교량 1개소 설치, 호안정비 300m정비(공정율 100%)

◦ 도로조명 신규설치로 여성 및 노약자의 야간통행 불편해소

▸보안등신규설치공사 186개소  - 171,788천원  : 2016.01~07

▸가로등정비 및 유지보수 6개사업  - 119,384천원  : 2016.01.~09

2016 주요업무 추진상황

		공익사업을위한용지보상 평화육교재가설사업 군도23호도로·확포장공사 시·군도농어촌도로확포장사업 왕궁천하천환경정비사업 소하천정비사업(오동정천,외산천) 금강생태하천기본계획실시설계 도로조명시설조도개선

1		공익사업을 위한 용지보상

○ ○	시민에게 다가서는 보상행정으로 양질의 서비스 제공 공익사업을 위한 적극 협의보상 도로망 확충으로 도시발전 기여

□ 현   황

(2016. 9. 30. 현재)

구분	보상대상			보상실적				미보상 토지
	개소	필지	면적	개소	필지	면적	비율	개소	필지	면적
계	42	2,713	644,580	42	1,998	470,036	73%	42	715	174,544
도시개발과	14	430	76,824	14	337	50,845	66%	14	93	25,979
건 설 과	16	1,291	326,933	16	810	214,474	66%	16	481	112,459
도로관리과	3	51	9,688	3	38	7,415	77%	3	13	2,273
시민안전과	7	379	88,934	7	317	75,869	85%	7	62	13,065
타 기 관	2	562	142,201	2	496	121,433	85%	2	66	20,768

□ 추 진 실 적

◦ 토지매입실적 (73%) :    42개소 /   1,998필지  /  470,036㎡

◦ 보상계획 열람공고   :     5개소 /    313필지  /   118,951㎡

◦ 감정평가 실시       :     15개소 /    358필지  /   129,759㎡

◦ 토지수용재결 및 공탁완료 : 6개소 /    38필지  /    9,983㎡

□ 마무리 대책

◦ 보상계획 : 42개노선 715필지 – 174,544㎡(9,532백만원)

▸독려반 2개반 3명 편성운영하여 적극적인 보상업무 추진

▸협의기간내 미협의자 개별방문 및 면담으로 집중 독려

▸해당 사업자별 현지(읍․면․동) 출장 보상협의 및 계약체결

▸소액보상자, 노약자, 장애인 등 현지방문 보상민원 처리

▸원거리거주자(서울,경기등)왕복 우편이용 보상협의계약 대행처리

2		평화육교 재가설 사업

안전등급 D등급인 평화육교의 고속철도 통과시 진동으로 인한 육교의 안정성 저하로 대형 사고위험이 상존하고 있어 재가설 추진으로 안전한 교통망 확보

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 평화동 255번지 일원

◦ 사업기간 : 2015. 11 ~ 2018. 12

◦ 사업규모 : 평화육교재가설 L=255m(4차로 ⇒ 6차로 확장)

◦ 총사업비 : 497억원 (국비 307, 익산시 190 )

◦ 사업시행 : 한국철도시설공단

□ 추 진 실 적

◦ 실시설계용역 시행(한국철도시설공단)  착수  : 2015. 11. 4

◦ 사업추진 협약체결 협의	: 2016.  1 ~ 4.

◦ 실시설계 실무 협의                         : 2016.  3 ~ 10.

‣ 실시설계 검토 – 교량선형, 보도폭 등

‣ 차량 우회도로 대책 등 사전 검토

□ 마무리 대책

◦ 기본 및 실시설계 완료(한국철도시설공단)	: 2016. 10 ~ 11

▸ 용역 준공 및 사업승인 행정절차 이행

◦ 공사발주(한국철도시설공단)	: 2016. 12월

◦ 공사추진	: 2017. 1 ~ 2019. 12

▸ 호남선 KTX 노반공사와 병행 시행

3		군도23호 도로확포장 공사

삼기 일반산업단지 조성에 따른 함열~산업단지간 교통증가에 대비하고, 원활한 교통망 구축으로 물류수송비용 절감 및 지역 균형발전 촉진

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 함열 용왕교차로(국도23호) ~ 삼기일반산업단지

◦ 사업기간 : 2016. 01 ~ 2019. 12

◦ 사업규모 : L=3.4km, B=20m (2차로 ⇒ 4차로 확장)

◦ 총사업비 : 125억원 (공사비 90, 보상비 35)

□ 추 진 실 적

◦ 토지 분할 측량 및 공부 정리	: 2016. 1 ~ 2

‣ 434필지 111,650㎡

◦ 토지보상 공람공고 및 감정평가 시행	: 2016. 2 ~ 5

‣ 248필지 51,370㎡ (총 35억원 : 토지 24, 물건 7, 영농보상 4)

◦ 보상협의 통보 (2016년 예산확보액 11억원)     : 2016. 6

◦ 토지 및 지장물 손실보상	: 2016. 6 ~ 2016. 10.

▸ 총 248필지 51,370㎡ 중 52필지 14,700㎡ 매입(매입율 28.6%)

□ 마무리 대책

◦ 미확보 보상비 2017 본예산 확보(약 24억원)	: 2016. 10 ~ 12..

◦ 2차 보상협의 및 미협의 토지 수용재결 등	: 2017. 1 ~ 12.

4		시․군도 농어촌도로 확․포장사업

농어촌도로확포장으로 차량통행 불편해소 및 기계화 영농기반 구축으로 주민편익 증대

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 여산면, 성당면, 용동면, 여산면 일원

◦ 사업규모 : 공사 6건  L= 7.57km, B=8.0m(2차로)

◦ 사 업 비 : 2,679백만원(6개사업, 이월예산 포함)

▸ 함라 수동~금곡간 도로확·포장공사           : 308백만원

- L=1.11km, B=8m                       (본 255, 사 53)

▸ 오산 북영선 도로확·포장공사 : 698백만원

- L=1.73km, B=8m                       (본 600, 명 98)

▸ 여산 신리~호월간 도로확·포장공사 : 512백만원

- L=1.4km, B=8m                        (본 0,   명 512)

▸ 용동 삼정~두무간 도로확·포장공사 : 288백만원

- L=1.21km, B=8m                        (본 200, 명 88)

▸ 성당 삼회선 도로확·포장공사 : 723백만원

- L=1.38km, B=8m                 (본 250, 명164, 사 309)

▸ 춘포 학연~익산천 제방간 도로확·포장공사 : 150백만원

- L=0.74km, B=8m                         (본 150)

◦ 예산 확보 현황(계속사업)

(단위 : 백만원)

노선수	사업량	총사업비	기투자	2016년	금후	비 고
23개	L=32.96㎞	52,598	9,768	2,555	40,275

□ 추 진 실 적

◦ 함라 수동~금곡간 도로 확·포장공사

▸ 행정절차 이행 및 공사 총괄 발주      : 2015. 2. ~ 2015.  6.

▸ 공사 시행 및  준공, 도로개통          : 2015. 6. ~ 2016.  6. 22

◦ 오산 북영선 도로 확·포장공사

▸ 설계 심의 및 계약심사 이행, 총괄발주 의뢰      : 2016. 1. ~ 3.

▸ 1차분 공사 추진 (폐기물 처리 및 토공 등)       : 2016. 3 ~ 9.

◦ 여산 신리~호월간 도로 확·포장공사.

▸ 행정절차 이행 및 공사 총괄 발주      : 2015. 2. ~ 2015.  6.

▸ 공사 시행 및  준공, 도로개통         : 2015. 6. ~ 2016.  6. 22.

◦ 용동 삼정~두무간 도로 확·포장공사

▸ 행정절차 이행 및 총괄발주               : 2015. 4. ~ 2016.  2.

▸ 1차분 공사 추진(토공 및 배수로 설치 등)  : 2016. 3. ~ 9.

◦ 성당 삼회선 도로 확·포장공사

▸ 행정절차 이행 및 총괄발주               : 2015. 2. ~ 2015.  9.

▸ 공사 시행 및  준공, 도로개통         : 2015. 11. ~ 2016.  7. 29

◦ 춘포 학연~익산천 제방간 도로 확·포장공사

▸ 토지 분할 및 보상 실시                : 2016.  1. ~ 6.

※ 총 22필지 2,369㎡중 15필지 1,874㎡ (매입율 79%)

▸ 설계심의 의뢰	: 2016. 10.  6

□ 마무리 대책

◦ 오산 북영선 도로 확·포장공사

▸ 1차분  공사 추진 (토공, 하수공, 구조물공 등)  : 2016. 10. ~ 12.

▸ 잔여분 2017 본예산 확보(500백만원)        : 2016. 10 ~ 12.

◦ 용동 삼정~두무간 도로 확·포장공사

▸ 1차분 공사 추진(토공, 하수공, 구조물공 등)  : 2016. 10.  ~ 2016. 12.

▸ 잔여분 2017 본예산 확보(1,471백만원)	: 2016. 10 ~ 12.

◦ 춘포 학연~익산천 제방간 도로 확·포장공사

▸ 미매입 토지 보상협의	: 2016. 10 ~ 12.

(대상 : 7필지  495㎡)

▸ 잔여분 2017 본예산 확보(1,031백만원)	: 2016. 10 ~ 12.

시 ․ 군도 및 농어촌도로 사업추진현황(계속사업)

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	사업개요	예 산 액				추진실적	노선명	비고
			총 사업비	기투자	2016년 예산액	금후 투자
	23개사업	L=32.96km B=8~20m	52,598	9,768	2,555	40,275
1	함라 수동~금곡간 도로확.포장	L=1.11km B=8.0m	1,339	1,084	255	0	준공	함라 207 (수곡선)
2	오산 북영선 도로확.포장	L=1.73km B=8.0m	2,526	1,426	600	500	공정율 30%	오산 204 (북영선)
3	여산 신리~호월간 도로확.포장	L=1.4km B=8.0m	1,162	1,162	0	0	준공	여산 203 (신호선)
4	삼성동 하나로~ 외화간도로확.포장	L=1.55km B=8.0m	3,180	730		2,450	용지 63%	시도1201 (외화선)
5	오산 신수선 도로확.포장	L=1.5km B=7.0m	1,079	879		200	용지 93%	오산 203 (신수선)
6	오산 장신~만석간 도로확.포장	L=1.6km B=8.0m	1,786	274		1,512	용지 87%	오산 301 (용연선)	군도 1호
7	용동 삼정~두무간 도로확.포장	L=1.21km B=8.0m	1,847	176	200	1,471	공정율 10%	용동 204 (삼두선)
8	함라 진등 진입로 개설	L=1.43km B=6.5m	1,063	145		918	용지 85%	함라 301 (행진선)
9	함라 칠성~다은간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m	975	190		785	용지 85%	함라 201 (진다선)
10	오산 모산선(신모선) 도로확.포장	L=1.7km B=6.5m	2,096	212		1,884	용지 85%	오산 306 (신모선)	일부 폐지
11	망성 군도10호~ 금지간 도로확.포장	L=1.2km B=8.0m	1,872	180		1,692	용지 66%	군도 10호
12	왕궁 군도26호선 도로확.포장	L=1.7km B=8.0m	2,970	577		2,393	용지 75%	군도 26호
13	망성 신성~관산간 도로확.포장	L=0.91km B=7.0m	1,365	306		1,059	용지 68%	망성 303 (신선선)
14	금마 갈산~서편간 도로확.포장	L=1.6km B=8.0m	2,829	229		2,600	용지 45%	금마 101 (서삼선)
15	왕궁 가좌마을 진입로확.포장	L=0.7km B=8.0m	1,116	103		1,013	용지 63%	왕궁 303 (사곡선)
16	금마 누동~신촌간 도로확.포장	L=0.93km B=8.0m	1,411	405		1,006	용지 56%	금마 102 (누부선)
17	왕궁 평화촌~평리간 도로확.포장	L=1.3km B=8.0m	3,445	180		3,265	용지 52%	왕궁 302 (신평선)
18	왕궁 온수~시대간 (황암~상발)확.포장	L=3.0km B=8.0m	2,803	296		2,507	용지 57%	군도 21호
19	춘포 토다리~덕동간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m	2,220	127		2,093	용지 9%	춘포 103 (신화선)
20	성당 삼회선(성당우회도로) 도로 확포장공사	L=1.38km B=8.0m	968	718	250	0	준공	성당 302 (삼회선)
21	용안 창리~법성간 도로확.포장	L=0.84km B=8.0m	846	30		816	설계완료	용안 203 (자석선)
22	춘포 학연~익산천간 도로확.포장	L=0.77km B=8.0m	1,200	19	150	1,031	설계완료	춘포 201 (천서선)
23	군도23호 도로확포장공사	L=3.4km B=20.0m	12,500	320	1,100	11,080	보상중 28%	군도 23호

5		왕궁천 하천환경정비사업

	○ 왕궁천 하천정비로 유역내 농경지 침수 및 하천재해예방을 통한 안전한 하천관리

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 왕궁면 동용리~춘포면 익산천 합류점

◦ 사업기간 :  2015. ~ 2018.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=9.25km

◦ 총사업비 : 24,720백만원(국비 12,360, 도비 4,944, 시비 7,416)

▸2016년 예산 확보액 - 600백만원(기투자 -용역비 800백만원)

◦ 사업내용 : 하천정비 L=9.25km(제방축조 및 보축, 교량 재가설 등)

□ 추 진 실 적

◦ 지방청 협의(공법적정성,사업비경제성,구조물적정성등)     : 2016. 4.

◦ 주민설명회(제방법선 및 호안공법, 시설물계획등)          : 2016. 6.

◦ 설계공법심의 및 VE실시                                : 2016. 10.

□ 마무리 대책

◦ 건설기술심의 및 총사업비 협의                         : 2016. 12.

◦ 용역준공 및 토지분할 및 보상                          : 2017. 01.

◦ 장기계속공사 발주                          : 2017. 02

6		소하천 정비사업(오동정, 외산천)

○ ○	소하천 유역의 치수안정 및 이수기능을 확보하여 생태환경을 보전하고 미개수 소하천 정비로 농경지 및 취락마을 침수 피해 해소 자연형 생태하천 정비로 소득기반시설 확충 및 시민 휴식공간 활용을 통한 주민들의 삶의 질 향상 도모

사 업 명	위 치	사업기간	사업비(백만원)	사 업 량
오동정천 소하천 정비공사	망성 어량리 일원	2015. ~ 2017.	3,600 (국 1,800 시 1,800) ▸기투자 : 1,106 ▸2016년 : 800	소하천정비 L=0.74km ▸현공정 85%
외산천 소하천 정비공사	금마 산북리 일원	2015. ~ 2016.	1,800 (국비 900 시비 900) ▸기투자 : 706 ▸2016년 : 750	소하천정비 L=0.62km ▸현공정 100%

□ 사 업 개 요

□ 추 진 실 적

◦ 오동정천 소하천정비공사 1차분 준공               : 2016. 5.

◦ 오동정천 소하천정비공사 2차분 착공               : 2016. 5.

◦ 외산천 소하천정비공사 2차분 준공                 : 2016. 8.

□ 마 무 리 대 책

◦ 오동정천 소하천정비공사 2차분 추진                : 2016. 5. ~ 11.

7		금강생태하천 기본계획 실시 설계

○	금강생태하천(용안지구)의 친수공간 기능 유지 및 이용객 휴식공간을 제공하여생태하천 친수공간의 활성화를 목표로 함

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 금강생태하천(용안지구) 일원

◦ 규    모 : A=670,000㎡

◦ 사업기간 : 2016.3 ~ 12.

▸ 금강생태하천 내 시설물 보수보강 및 생태습지원, 호습성습지관찰원 보수보강

□ 추 진 실 적

◦ 금강생태하천(용안지구)활성화를 위한 실시설계용역발주 : 2016.3

◦ 금강생태하천(용안지구)활성화를 위한 용역보고회(2회)   : 2016.3~4

◦ 금강생태하천(용안지구) 실시설계관련 협의             : 2016.6~9

▸국가하천 관리청 – 대전지방국토관리청(하천계획과)

□ 마무리 대책

◦ 금강생태하천(용안지구)활성화를 위한 실시설계용역 준공 : 2016.11

8		도로조명 시설 조도개선

○ ○	도로조명 신규설치로 보행자 및 운전자의 야간통행 불편해소 노후 조명시설을 정비하여 밝은 거리조성에 기여하고자 함.

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원

◦ 사 업 량 : 8개 사업

◦ 사 업 비 : 601백만원(시비:577, 도비:24)

◦ 사업기간 : 2016. 01. ~ 2016. 12.

◦ 사업내역

구 분	세부사업	사 업 개 요	예산 (천원)	비 고
합 계		8개 사업	601,944	추경
보 안 등 신규설치	생활환경개선사업	보안등신규설치 367개소	404,364	122,500
	주민편익증진사업	낭산면외 4개소 보안등설치	24,000	24,000
노 후 가로등정비	도심지역가로등유지보수	고장가로등 정비 50개소	50,000
	산업단지가로등유지보수	가로등보수 30개소	30,000
	가로등노후점멸기교체공사	노후점멸기교체 5개소	22,500
	읍면지역보안등보수	읍면지역고장보안등수리	34,080
	노후보안등기구교체	노후 보안등기구 교체	30,000
	모현동주민센터앞가로등교체공사	가로등교체6개소	7,000	7,000

□ 추 진 실 적 -------------------------- 291,172천원, 48.3%

◦ 보안등 신규설치공사 186개소  - 171,788천원  :  2016. 01. ~ 09.

◦ 가로등정비 및 유지보수 6개사업  - 119,384천원  :  2016. 01. ~ 09.

□ 마 무 리 대 책

◦ 추경예산 보안등 신규설치공사 사업추진       :  2016. 09. ~ 12.

◦ 가로등정비 및 고장보안등수리 사업추진       :  2016. 09. ~ 12.