하수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2016 예산집행실적
□	2016 주요성과
□	2016 주요업무결산

비전 및 중점추진방향

	비 전
완벽한 하수처리로 시민이 쾌적한 도시환경 조성

		전 략 목 표
◦ ◦	하수처리 운영 효율 증대로 쾌적한 주거환경 제공 수질개선을 통한 악취없는 청정녹색도시로 시민만족 행정 구현

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	정화된 하수를 이용한 방류수 재이용 및 생태습지공원 조성 하수관거사업 추진으로 방류지역의 수질보전 효율적인 하수종말처리장 운영으로 예산절감 및 수질보전

일  반  현  황

□ 기       구

						하수도과
하수행정			하수시설			하수운영			생활하수			하수관리			지하수

□ 정  ․  현  원

(단위:명)

구 분	계	직 급 별								비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	계약	기타
정 원	28		1	8	5	6	8	-	-
현 원	28		1	10	10	6	1	-	-
증 감	-		-	2	5	-	▵7

□ 사  무  분  장

◦	하수행정 :	하수행정종합계획수립조정, 하수도특별회계 현금출납 및 금고감독, 입찰 및 계약, 하수도사용료․원인자부담금 부과징수, 공기업평가 결산
◦	하수시설 :	하수정비기본계획 수립, 하수관거임대형민간투자사업(BTL), 천서․왕궁지구 하수관거 정비사업, 화정 소규모마을 하수처리장 설치 사업, 유천생태습지 유지관리
◦	하수운영 :	하수슬러지 처리사업 추진, 공공하수처리시설 설치․개선․운영관리, 3산단 폐수종말처리시설 운영관리
◦	생활하수 :	개인하수처리시설 설치신고․준공․지도점검, 분뇨수집․운반업 허가 및 지도점검, 공중화장실, 배수설비협의
◦	하수관리 :	시내일원하수도공사, 하수생활민원처리, 주민숙원사업, 맨홀정비, 준설원 관리, 온천지구 지정 및 관리
◦	지 하 수 :	지하수개발이용 허가․신고․준공, 지하수관련업 등록 및 지도점검, 지하수 이용부담금 부과

□ 하수도 일반 현황

구 분		단 위	2016. 9.	비 고
시설	총인구	천명	303
	하수인구	천명	267
	보급률	%	88
하수처리	1일평균하수발생량	톤	118,501
	1일평균하수처리량	톤	116,030
	하수처리율	%	97.91
하수도 사용	개소수	전	38,754
	톤당 평균요금	원	292.95	2015년 말

□ 하수처리시설 현황

시 설 명	개 소	처리용량	비 고
계	27	139,521㎥/일
익산공공하수처리시설	1	100,000㎥/일	민간위탁 ((주) 전북엔비텍)
함열공공하수처리시설	1	6,000㎥/일	〃
북부공공하수처리시설	1	30,000㎥/일	〃
금마공공하수처리시설	1	1,100㎥/일	〃
여산공공하수처리시설	1	600㎥/일	직영
소규모 공공하수처리시설	21	1,671㎥/일	직영
분뇨처리장	1	150㎥/일	민간위탁 ((주) 전북엔비텍)

하수관거 정비사업 현황

구 분	위 치	사 업 량		사 업 비 (백만원)			2016년 예산		사업 기간	공 정 율 (%)
		설계량	현시공량	계	국비 (70%)	지방비 (30%)	신청	반영
완 료 사 업	4개 사업	L=34km 1,104가구	L=34km 1,104가구	24,489	17,142	7,347
함열처리구역 하수관거 정비공사	용안면난포리 (신은지구)	L=10.0km 241가구	L=10.0km 241가구	7,368	5,157	2,211	-	-	11.01. ~16.04.	100
	낭산면삼담리 (북지지구)	L=6.9km 198가구	L=6.9km 198가구	5,855	4,099	1,756	-	-	11.01. ~15.12.	100
	성당면성당리 (성당지구)	L=5.7km 159가구	L=5.7km 159가구	3,223	2,256	967	-	-	11.01. ~15.07.	100
춘포처리구역 하수관거 정비공사	춘포면춘포리 석탄동	L=11.4km 506가구	L=11.4km 506가구	8,043	5,630	2,413	-	-	11.01. ~16.06.	100
진 행 중	5개 사업	L=65.976km 1,253가구	L=47.5km 595가구	36,337	24,725	11,612	8,130	8,130
천서왕궁지구 하수관거 정비공사	왕궁 온수리 (익산,금오,신촌농장) 춘포 천서리, 오산리	L=45.1km 854가구	L=36.3km 447가구	25,486	17,840	7,646	6,816	6,816	14.01. ~17.06.	74
화정지구 마을하수처리장설치공사	망성면 내촌리	L=10.4km 256가구 처리장120톤	L=10.0km 128가구 배관공사	5,464	3,825	1,639	600 (시비)	600 (시비)	14.01. ~17.04.	87
오산지구 하수관거 정비공사	오산면 신지리 광지외 3개마을	L=8.6km 98가구	실시설계 용역중	4,372	3,060	1,312	714	714	16.01. ~17.12.	실시 설계 90
춘포판문마을하수관거 정비공사	춘포면 판문마을	L=0.576km 32가구	L=0.5km 20가구	480	-	480	-	-	16.08. ~17.01.	70
함열처리구역(와리외2개소)하수관거 정비공사	함열 흘산 어양동 현영동	L=1.3km 13가구	L=0.6km	535	-	535	-	-	16.08 ~17.02.	50
임 대 형 민자사업	2개 사업	L=186.4km 10,941가구	L=186.4km 10,941가구	129,419	129,419		14,431	14,431
06하수관거 임대형민자사업 (BTL)	신동, 남중동, 영등1동, 모현동, 황등면	L=86.5km 4,644가구	L=86.5km 4,644가구	59,883	59,883		7,054	7,054	11.05. ~31.05.	푸른 익산 환경 (주)
09하수관거 임대형민자사업 (BTL)	평화동, 송학동, 모현동, 남중동, 중앙동, 창인동, 인화동,신동	L=99.9km 6,297가구	L=99.9km 6,297가구	69,536	69,536		7,377	7,377	14.08. ~34.08.	청정 익산 (주)

2016 예산집행실적

【 2016. 10. 15. 현재 】                                      (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율	비고
하수도과				71,171,459	40,226,149	30,945,310	56.6
	하수도사업비용			34,480,290	30,335,156	4,145,134	87.9
		영업비용		34,355,490	30,332,394	4,023,096	88.2
			관거비	16,644,550	14,177,793	2,466,757	85.1
			펌프장비	164,500	106,057	58,443	64.4
			처리장비	14,598,875	14,023,909	574,966	96.0
			일반관리비	2,947,565	2,024,635	922,930	68.6
		영업외비용		22,800	2,762	20,038	12.1
			차입금이자상환	22,800	2,762	20,038	12.1
		예비비		102,000	0	102,000	0
			예비비	102,000	0	102,000	0
	자본적지출			36,691,169	9,890,993	26,800,176	26.9
		유형자산취득		27,903,264	8,749,345	19,153,919	31.3
			구축물	27,659,064	8,668,466	18,990,598	31.3
			공기구비품	44,200	39,360	4,840	89.0
			건설중인자산	200,000	41,519	158,481	20.7
		비가동설비자산취득		7,715,465	981,773	6,733,692	12.7
			건설중인자산	7,715,465	981,773	6,733,692	12.7
		비유동부채상환		177,200	132,900	44,300	75.0
			정부차입금원금상환	177,200	132,900	44,300	75.0
		기타자본적지출		595,240	26,975	568,265	4.5
			기타자본적지출	595,240	26,975	568,265	4.5
		예비비		300,000	0	300,000	0
			예비비	300,000	0	300,000	0

2016 주요성과

□ 성   과

◦『익산시 지하수 관리 조례』에 따른 지하수 이용부담금 최초 부과․징수

▸879개소, 51,420천원(7 ~ 10월 사용분)

◦ 천서왕궁지구 하수관거 정비사업 추진

▸오수관로 36.3km, 배수설비 447개소, 맨홀펌프 29개소

◦ 공공하수처리장 최적운영을 통한 수질환경 개선

▸총27개소(139,521㎥/일) 하수처리시설의 정상가동 및 유지관리

▸하수처리시설 적정운영 관리를 통한 처리효율 향상 및 수질오염 저감

◦ 읍면동 소규모 하수도 시설공사 및 생활민원 신속처리

▸하수도 정비 L=2.32㎞, 하수도기계준설 1,339㎥

▸원활한 하수배제를 위한 맨홀 및 하수도 준설 483건, 파손 하수관로 복구 및 맨홀 단차조정 1,234건 실시

□ 반   성

◦ 하수슬러지 처리시설 설치사업 계약해지에 따른 후속 대책 미흡으로 행정 신뢰 저하

◦ 국비 확보 및 행정절차 이행에 시일이 소요되어 일부지역 배수설비 설치가 지연되었고, 이에 따른 지역 주민 불편 초래

2016 주요업무결산

		하수슬러지 처리사업 추진
		오산 문화마을 하수관거 정비사업
		유천 생태습지 유지관리
		읍․면․동지역 하수도 시설 및 준설공사
		지하수 이용부담금 부과․징수

1		하수슬러지 처리사업 추진

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 량 : 100㎥/일×1기(건조+에너지회수44㎥(소각))

◦ 사 업 비 : 19,800백만원(국비 13,860, 시비 5,940)

▸한국환경공단 지급액 : 13,627백만원(국 9,540, 시 4,087)

▸코오롱환경서비스(주) 지급액 : 3,650백만원(전체공정율 17.3%)

◦ 추진방식 : 설계·시공입괄입찰(한국환경공단 사업추진))

□ 추 진 실 적

◦ 공사계약 해지통지(한국환경공단⇒코오롱환경서비스(주))   : 2014. 12. 29.

◦ 도급계약해지 무효확인 등 소송제기(코오롱환경서비스(주))   : 2015. 02. 12.

◦ 무자격사와 계약관련 변호사(정부법무공단 배태근변호사) 추가 선임 : 2015. 12. 17.

◦ 원고측 소송취지변경 및 손해배상청구(2,696,352,554원)   : 2015. 12. 23.

◦ 하수슬러지 처리시설 해결방안 모색을 위한 토론회(2회)       :‘16.2.23/3.25.

◦ 지역주민과 함께하는 하수슬러지 선진지 견학(2회)      :‘16.5.30./6.3.

◦ 하수슬러지 방향성 정립을 위한 환경정책자문 토론회    : 2016. 07. 25.

◦ 하수슬러지 감량화 및 기 시설물 활용 타당성조사용역 실시 : 2016. 09. 20.

◦ 하수슬러지 후속 대안마련 시민 참여 공개 토론회 개최 : 2016. 10. 06.

□ 마무리 대책

◦ 하수슬러지 감량화 타 지자체 우수사례 견학         : 2016. 10.

◦ 하수처리시설 발생량 원천적 감량화 후 최종 처리대책 강구 : 2016. 11. ~ 12.

◦ 하수슬러지 손해배상 최소화를 위한 소송 적극 대응  : 계속

2		오산 문화마을 하수관거 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 오산면 신지리 광지, 옥포, 신석, 북신석마을

◦ 규    모 : 오수관로 8.6km , 배수설비 98가구

◦ 사업기간 : 2016년 ~ 2017년(2년간)

◦ 사 업 비 : 4,372백만원(국비 3,060/도비 131/시비 1,181)

▸2016년 : 714백만원(국비 500/도비 21/시비 193)

□ 추 진 실 적

◦ 추경성립 전 사용승인                         : 2016. 2. 1.

◦ 실시설계용역 시행                            : 2016. 3. ~ 10.

□ 마무리 대책

◦ 행정절차이행(재원협의, 원가심사 등)          : 2016. 11.

◦ 공사 착공 및 준공                           : 2016. 12. ~ 2017. 12.

3		유천 생태습지 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 금강동 993-1번지 일원

◦ 규    모 : 생태습지 유지관리 A=134,521㎡

▸ 잔디 및 풀깍기(55,330㎡), 수목(교목 1,503주, 관목 44,200주), 정자 2개, 퍼걸로 8개, 바닥분수 1개, 등의자 36개, 평의자 30개 및 수질 관리 등

◦ 사업기간 : 연 중

◦ 사 업 비 : 200백만원

□ 추 진 실 적

◦ 시설물 유지관리 착수                         : 2016. 2. ~ 계속

◦ 주민편익시설 보강 설치                       : 2016. 2. ~ 9.

▸운동기구(15대), 어린이 조합놀이대, 음수대, 부유정화기, 가로등 및 경관등, 이동화장실 등 설치

□ 마무리 대책

◦ 시설물 유지관리 추진                         : 계속

4		읍․면․동지역 하수도 시설 및 준설공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원

◦ 총사업비 : 1,939백만원(국비 400 /시비 1,539)

▸노후하수관거 보수보강사업(명시)   : 암거 보강 L=70m

▸하수도 시설공사 유지보수         : 정비 3.5km

▸남중동 하수도 토지보상비(1회추경) : 1건/55백만원

▸시내일원 맨홀뚜껑교체공사        : 250개소

▸하수도기계준설                   : 1,800㎥

▸생활환경개선사업                 : 16개소

▸읍면동 주민숙원사업 등           : 6개소

▸하수관로 GIS시스템 구축 용역     : L=10㎞

◦ 사업기간 : 2016. 1. ~ 11.

□ 추 진 실 적

◦ 공사발주 및 사업 추진(공정율 80% )             : 2016. 2. ~ 12.

▸연중추진 : 하수도 유지보수, 맨홀뚜껑교체공사, 기계준설, GIS

▸완료사업 : 생활환경개선사업(6건), 주민숙원사업(16건), 토지보상(1건)

▸추 진 중 : 노후 하수관거 보수보강 사업

□ 마무리 대책

◦ 하수도 유지보수 사업 추진                     : 2016. 10. ~ 12.

5		지하수 이용부담금 부과․징수

□ 사 업 개 요

◦ 부과일정 : 2016. 7월 사용량부터

◦ 부과대상 : 지하수개발‧이용자 879개소(생활용, 공업용)

▸부과제외 : 학교, 농업용, 가정용, 사회복지시설, 비상급수시설, 부과금액 2,000원 미만

◦ 부과금액 : 85원/톤(한강수계 물이용부담금의 50%)

▸관련법 : 지하수법 제30조의3, 익산시 지하수관리조례 제17조

□ 추 진 실 적

◦ 부과대상 현지 실태조사(1,226개소)               : 2016. 2. ~ 4.

▸부과대상 879, 제외대상(농업, 가정용 등) 147, 시설 없음 115, 사용안함 85

◦ 미신고지하수 자진신고기간 운영(총10,910건)      : 2016. 3. ~ 4.

◦ 지하수이용부담금 부과‧징수에 따른 홍보         : 2016. 4. ~ 6.

◦ 부과 프로그램 및 계측기(시간계) 구입․설치       : 2016. 7.

◦ 지하수이용부담금 부과‧징수                     : 2016. 9.

▸부과금액(7 ~ 10월 사용분) : 51,420천원

□ 마무리 대책

◦ 지하수 이용부담금 부과대상 지속적인 확인 후 부과

◦ 지하수 이용부담금 납기내 징수율 제고를 위한 납부 홍보 및 독려