건설과

□	비전및중점과제추진방향
□	일반현황
□	2016 주 요 성 과
□	2017 주 요 업 무 계 획

비전 및 중점과제 추진 방향

	비 전
아름답고 깨끗한 녹색도시 건설

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦ ◦	시민에게다가서는 보상행정으로 양질의 서비스제공 도·농균형발전 및 거점개발 추진을 위한 도로시설확충 환경을 우선으로 하는 생태하천 조성으로 시민 휴식공간 제공 장애인과 여성들을 위한 시민중심의 밝고 안전한 거리조성

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	공익사업을 위한 적극 협의보상 도로망 확충으로 도시발전 기여 도로확포장으로지역간소통원활및통행불편해소 생태하천정비로생활환경개선및주민편익도모 조명시설설치로보행환경개선및야간통행불편해소

일  반  현  황

□ 기       구

					건 설 과
건설행정				도로시설			하천시설					하천관리					가로등관리

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별								비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능	계약
정 원	22		1	6	10	3	2
현 원	22		1	6	8	5	2
증 감					△2	2

□ 사 무 분 장

◦건설행정 : 국 소관사업 및 유관기관 용지매입, 토지수용 재결

소유권이전 촉탁 및 상속등기, 기타 보상관련 업무전반

◦도로시설 : 철도건널목 개량사업, 고속국도, 국도, 지방도 등 사업관련

협의  시·군도, 농어촌도로 확·포장사업 추진

◦하천시설 : 하천기본계획 수립, 지방하천 개량사업, 소하천 정비사업

◦하천관리 : 하천제방관리, 골재채취허가, 하천사용료 징수 부과,

생태하천관리

◦가로등관리: 가로등· 보안등시설 종합계획, 유지보수관리, 생활민원

□ 하천 현황

(단위:km)

구 분	총 연 장		하천정비기본계획수 립 현 황		정비대상	개수연장	미개수 연 장	개수율
	개 소	연 장	개 소	연 장
합 계	92	323.633	85	305.673	323.633	153.779	169.854	47%
국가하천	3	34.2	3	34.2	34.2	34.2	-	100%
지방하천	27	187.23	20	169.27	187.23	92.41	94.82	49%
소 하 천	62	102.203	62	102.203	102.203	27.169	75.034	27%

□ 하 천 점 용 허 가  현황(2016년)

필 지 수				면 적(㎡)
계	답	전	대지	계	답	전	대지
782	552	164	66	585,512	423,666	149,076	12,770

□ 가로등․보안등 현황

계	보 안 등	가 로 등
28,029등	18,651등	9,378등

□ 차량보유 현황

가로등유지보수차량	하천관리차량
고가사다리차 3대	91러7428 더블캡 1대, 오토바이 1대

2016 주 요 성 과

□ 성      과

◦ 건설공사 편입용지 협의보상으로 공익사업 추진에 기여

▸ 사업지구 50개소(계속사업 45개소, 신규사업 5개소) 73%협의 완료

▸ 성당 삼회선(성당우회도로) 도로확포장공사 등 8개소 수용재결 및 공탁완료

◦ 농어촌도로 확포장으로 지역균형발전과 지역주민 교통불편 해소

▸ 여산 신리~호월간 도로확포장(L=1.40㎞)	: 2016년 6월 준공

▸ 함라 수동~금곡간 도로확포장(L=1.11㎞)	: 2016년 6월 준공

▸ 성당 삼회선 도로확포장(L=1.38㎞)	: 2016년 9월 준공

◦ 자연과 생명이 살아 숨쉬는 친환경을 우선으로 하는 하천 정비로

재해예방 및 시민 친수공간 조성

▸ 왕궁천 하천환경정비사업

- 2016년까지 국비 7억원 확보하여 실시설계용역 완료

- 2017년 장기계속공사 발주예정

▸ 소하천 정비사업

- 외산천 : 교량 1개소 설치, 호안정비 250m정비

- 오동정천 : 교량 1개소 설치, 호안정비 300m정비

◦ 도로조명 보수 및 설치로 밝고 깨끗한 거리를 조성하여 야간보행자의 안전도모

▸ 보안등 신규설치 311개소 , 노후가로등 정비 115개소

▸ 가로등 ․ 보안등 민원처리 4,402건

2017주요업무계획

		공익사업을위한 용지보상 군도23호선 도로확포장 평화육교 재가설 시·군도및농어촌도로확·포장사업 왕궁천 하천환경 정비사업 소하천 정비사업(오동정천,대판천) 만경강 물문화관 조성사업 도로조명 조도개선

1		공익사업을 위한 용지보상

□ 현    황

구분	보상대상			보상실적				미보상 토지
	개소	필지	면적	개소	필지	면적	비율	개소	필지	면적
계	50	2,807	760,988	50	1,885	557,179	73%	50	922	203,809
도시개발과	26	733	122,910	26	411	61,169	50%	26	322	61,741
건 설 과	20	1,429	482,378	20	887	355,320	74%	20	542	127,058
도로관리과	1	41	7,965	1	26	6,163	77%	1	15	1,802
시민안전과	1	31	4,897	1	26	4,838	99%	1	5	59
타 기 관	2	573	142,838	2	535	129,689	91%	2	38	13,149

※ 신규사업 5개소(도시개발과 3, 건설과 2)

□ 추 진 계 획

◦ 보상계획 : 50개노선 922필지 – 203,809㎡(27,997백만원)

▸독려반 2개반 4명 편성 운영하여 적극적인 보상업무 추진

▸협의기간 내 미협의자 개별방문 및 면담으로 집중 독려

▸해당 사업자별 현지(읍․면․동) 출장 보상협의 및 계약체결

▸소액보상자, 노약자, 장애인 등 현지방문 보상민원 처리

▸원거리거주자(서울,경기등)왕복 우편이용 보상협의계약 대행처리

□ 기 대 효 과

◦시민에게 다가서는 보상행정으로 양질의 서비스제공

◦공익사업을 위한 적극 협의보상 및 도로망 확충으로 도시발전 기여

2		군도23호선 도로확포장

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 함열 용왕교차로(국도23호)~삼기일반산업단지

◦ 사업기간 : 2016. 1 ~ 2019. 12

◦ 사업규모 : L=3.4km, B=20m (2차로 ⇒ 4차로 확장)

◦ 총사업비 : 125억원(공사비 90, 보상비 31 기타 4)

◦ 예산현황

(단위:백만원)

구 분	총사업비	2016년 이전	2017년			2018년 이후	비고
			소계	확보	미확보
총계	12,500	1,420	2,100	1,200	900	8,980
시비	12,500	1,420	2,100	1,200	900	8,980

□ 추 진 계 획

◦ 편입토지 및 지장물 협의매수(예산한도 내)	: 2017. 1 ~ 2017. 12

▸보상현황 - 총 248필지 51,900㎡ 중 53필지 14,776㎡(28.5%)

□ 기 대 효 과

◦삼기 일반산업단지 조성에 따른 함열~산업단지간 교통증가에 대비하고 원활한 교통망 구축으로 물류수송비용 절감 및 지역 균형발전 촉진

3		평화육교 재가설

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 평화동 255번지 일원

◦ 사업기간 : 2015. 11 ~ 2019. 12

◦ 사업규모 : 평화육교 재가설 L=255m(4차로 ⇒ 6차로 확장)

▸기존교량 철거 및 재가설, 접속도로 포장, 편입토지 손실보상 등

◦ 총사업비 : 497억원(국비 307, 익산시 190)

◦ 사업시행자 : 한국철도시설공단

◦ 예산현황

(단위:백만원)

구 분	총사업비	2016년 이전	2017년			2018년이후	비고
			소계	확보	미확보
총계	49,700	6,600	10,100	7,100	3,000	33,000
국 비	30,700	1,000	7,100	7,100	-	22,600
시비	19,000	5,600	3,000	-	3,000	10,400

□ 추 진 계 획

◦ 실시설계 용역 완료	: 2017. 3월 말

◦ 재가설공사 착공	: 2017. 6월

◦ 재가설공사 추진 및 개통	: 2019. 12

□ 기 대 효 과

◦ 안전등급 D등급인 평화육교 재가설로 대중교통 안전성 확보 및 호남고속철도(KTX) 완전한 정상화 실현

4		시․군도 및 농어촌도로 확․포장사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 오산면, 용동면, 춘포면, 망성면, 금마면, 왕궁면 일원

◦ 사업규모 :  L= 5.99km, B=5~20m

◦ 사 업 비 : 2,531백만원(7개사업, 이월예산 포함)

▸ 오산 북영선 도로확·포장공사                 :  815백만원

- L=1.2km, B=8m                (본 500, 명 281, 사 24)

▸ 용동 삼정~두무간 도로확·포장공사           :  658백만원

- L=1.21km, B=8m                             (명 658)

▸ 춘포 학연~익산천 제방간 도로확·포장공사    :  458백만원

- L=0.74km, B=8m                        (본 400, 명 58)

▸ 망성 신성~관산간 도로확·포장공사           :  200백만원

- L=0.91km, B=7m                             (본 200)

▸ 금마 누동~신촌간 도로확·포장공사           :  100백만원

- L=0.93km, B=7m                             (본 100)

▸ 오산 외용(외검선) 도로확·포장공사           :  100백만원

- L=0.8km, B=7m                              (본 100)

▸ 군도 19호선(하발~신평교차로) 교행장소 설치 :  200백만원

- L=0.2km, B=5m                              (본 200)

◦ 예산 확보 현황(계속사업)

(단위 : 백만원)

노선수	사업량	총사업비	기투자	2017년	금후	비 고
22개	L=28.34㎞	49,002	9,259	2,700	37,043

□ 추 진 계 획

◦ 오산 북영선 도로확·포장공사

▸ 1차분(토공, 배수공 등) 완료              : 2017.  5.

▸ 잔여분(포장공, 교통안전시설물 등) 완료   : 2017. 10.

◦ 용동 삼정~두무간 도로확·포장공사

▸ 1차분(토공, 배수공 등) 완료              : 2017.  6.

▸ 잔여분 예산확보 (10억원)

◦ 춘포 학연~익산천 제방간 도로확·포장공사

▸ 공사 발주                               : 2017.  1.

▸ 공사 추진(토공, 배수공, 포장공 등)       : 2017.  3. ~ 12.

◦ 망성 신성~관산간 도로확·포장공사

▸ 토지매입 추진(19필지 2,524㎡)            : 2017.  1. ~ 12

◦ 금마 누동~신촌간 도로확·포장공사

▸ 토지매입 추진(46필지 6,112㎡)            : 2017.  1. ~ 12

◦ 오산 외용(외검선) 도로확·포장공사

▸ 토지매입 추진(14필지 2,582㎡)            : 2017.  1. ~ 12

◦ 군도 19호선(하발~신평교차로) 교행장소 설치

▸ 공사 발주                               : 2017.  3.

▸ 공사 추진(토공, 포장공 등)               : 2017.  3. ~ 12.

□ 기 대 효 과

◦ 읍․면 농촌지역 도로망 확충으로 원활한 교통통행 및 주민생활

편익 기여

시 ․ 군도 및 농어촌도로 사업추진현황(계속사업)

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	사업개요	예 산 액				추진실적	노선명	비고
			총 사업비	기투자	2017년 예산액	금후 투자
	22개사업	L=28.34km B=8~20m	49,002	9,259	2,700	37,043
1	오산 북영선 도로확.포장	L=1.73km B=8.0m	2,526	2,026	500		공정율 25%	오산 204 (북영선)
2	용동 삼정~두무간 도로확.포장	L=1.21km B=8.0m	1,847	876		971	공정율 20%	용동 204 (삼두선)
3	춘포 학연~익산천간 도로확.포장	L=0.74km B=8.0m	569	169	400		용지 81%	춘포 201 (천서선)
4	군도23호 도로확포장공사	L=3.4km B=20.0m	12,500	1,420	1,200	9,880	용지 28%	군도 23호
5	망성 신성~관산간 도로확.포장	L=0.91km B=7.0m	1,365	306	200	859	용지 68%	망성 303 (신선선)
6	금마 누동~신촌간 도로확.포장	L=0.93km B=8.0m	1,411	405	100	906	용지 56%	금마 102 (누부선)
7	오산 외용(외검)선 도로확.포장	L=0.80km B=8.0m	1,000	117	100	783	용지 83%	오산 201 (외검선)
8	군도19호선(하발~신평 교차로) 교행장소 설치	L=0.20km B=5.0m	200		200			군도 19호
9	삼성동 하나로~ 외화간도로확.포장	L=1.55km B=8.0m	3,180	730		2,450	용지 63%	시도1201 (외화선)
10	오산 신수선 도로확.포장	L=1.5km B=7.0m	1,079	879		200	용지 93%	오산 203 (신수선)
11	오산 장신~만석간 도로확.포장	L=1.6km B=8.0m	1,786	274		1,512	용지 87%	오산 301 (용연선)	군도 1호
12	함라 진등 진입로 개설	L=1.43km B=6.5m	1,063	145		918	용지 85%	함라 301 (행진선)
13	함라 칠성~다은간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m	975	190		785	용지 85%	함라 201 (진다선)
14	망성 군도10호~ 금지간 도로확.포장	L=1.2km B=8.0m	1,872	180		1,692	용지 66%	군도 10호
15	왕궁 군도26호선 도로확.포장	L=1.7km B=8.0m	2,970	577		2,393	용지 75%	군도 26호
16	금마 갈산~서편간 도로확.포장	L=1.6km B=8.0m	2,829	229		2,600	용지 45%	금마 101 (서삼선)
17	왕궁 가좌마을 진입로확.포장	L=0.7km B=8.0m	1,116	103		1,013	용지 63%	왕궁 303 (사곡선)
18	왕궁 평화촌~평리간 도로확.포장	L=1.3km B=8.0m	3,445	180		3,265	용지 52%	왕궁 302 (신평선)
19	왕궁 온수~시대간 (황암~상발)확.포장	L=3.0km B=8.0m	2,803	296		2,507	용지 57%	군도 21호
20	춘포 토다리~덕동간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m	2,220	127		2,093	용지 9%	춘포 103 (신화선)
21	용안 창리~법성간 도로확.포장	L=0.84km B=8.0m	846	30		816	설계완료	용안 203 (자석선)
22	삼기 석라선 도로확포장	L=1.00km B=8.0m	1,400			1,400		삼기 203 (석라선)

5		왕궁천 하천환경 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 왕궁면 동용리~춘포면 익산천 합류점

◦ 사업기간 :  2015. ~ 2018.

◦ 사업규모 : 하천정비 L=9.25km

◦ 총사업비 : 24,720백만원(국비 12,360, 도비 4,944, 시비 7,416)

▸2017년 예산 확보액 – 4,000백만원(기투자 -1,400백만원)

◦ 사업내용 : 하천정비 L=9.25km(제방축조 및 보축, 교량 재가설 등)

□ 추 진 계 획

◦ 건설기술심의 및 총사업비 협의	: 2017. 01. ~ 04.

◦ 용역준공, 토지분할 및 감정평가 보상       : 2017. 04.

◦ 장기계속공사 발주                        :  2017. 05.

□ 기 대 효 과

◦ 통수 단면이 부족하고 노후 및 미 개수된 하천제방․호안을 체계적으로

정비하여 주택 및 농경지 침수 등 하천 재해예방에 기여

6		소하천 정비사업(오동정천,대판천)

□ 사 업 개 요

사 업 명	위 치	사업기간	사업비(백만원)	사 업 량
오동정천 소하천 정비공사	망성 어량리 일원	2015. ~ 2017.	3,600 (국 1,800 시 1,800) ▸기투자 : 1,906 ▸2017년 : 1,694	소하천정비 L=0.74km ▸현공정 70%
대판천 소하천정비공사	삼기 연동리 일원	2017. ~ 2018	1,600 (국비 800 시비 800) ▸기투자 : - ▸2017년 : 360	소하천정비 L=1.275km ▸현공정 0-0

□ 추 진 계 획

◦ 오동정천 소하천정비공사 3차분 추진            : 2017. 02. ~ 11.

◦ 대판천 소하천정비공사 실시설계 추진           : 2017. 01. ~ 05.

◦ 대판천 소하천정비공사 총액발주 및 1차분 착공  : 2017. 06. ~

□ 기 대 효 과

◦ 소하천 유역의 치수안정 및 이수기능을 확보하여 생태환경을 보전 하고

미 개수 소하천 정비로 농경지 침수피해 해소 및 하천재해예방 기여

7		만경강 물문화관 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 목천동 1183-23번지 외 12필지

◦ 사업기간 : 2015 ~ 2019

◦ 사 업 비 : 113억원(국비 100억, 시비 13억 토지매입비)

◦ 사업개요 : 11,992㎡(지하 1층 지상2층)/연면적 1,478㎡)

◦ 시설 현황

▸지하1층 : 기계/전기실, 수장고/비품실, 문화사랑방

▸지상1층 : 문화관람실, 로비, 사무실, 카페테리아

▸지상2층 : 생태전시 및 홍보관, 문화의 집

◦ 사업시행자 : 익산지방국토관리청(만경강신탁지구하천정비사업에 포함)

□ 추 진 계 획

◦ 물문화관 조성에 따른 도시관리계획 변경용역 시행 : 2015. 9.~2017.8

◦ 감정 평가 및 용지 보상 실시(익산시)             : ‘17. 9 ~ 12.

◦ 공사 추진(익산지방국토관리청)                   : ‘17.11 ~’19.12

□ 기 대 효 과

◦ 만경강에 문화관을 조성하여 만경강과 관련된 역사와 생활상을 전시·소개하고 이용객들의 편의 제공 및 체험활동 참여확대를 유도

8		도로조명 조도개선

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 익산시 일원

◦ 사업대상 : 보안등 신규설치공사외 7개사업

◦ 사업기간 : 2017. 01 ~ 12

◦ 사업예산 : 616,480천원

◦ 사업내용 : 우범지역 및 야간통행불편지역 도로조명 보수 및 설치

▸ 주요사업 세부내역

구 분	세부사업	사 업 개 요	예산 (천원)	비 고
합 계		8개 사업	616,480
보 안 등 신규설치	생활환경개선사업	보안등신규설치 238개소	264,940
	영등2동외 2개동 LED가로등교체공사	LED가로등교체 29개소	39,400
노 후 가로등정비	도심지역 가로등 유지보수	고장가로등 정비 90개소	90,000
	산업단지 가로등 유지보수	가로등보수 50개소	50,000
	가로등 노후점멸기 교체공사	노후점멸기교체 5개소	22,500
	읍면지역 보안등 보수	읍면지역고장보안등수리	34,080
	노후 보안등기구 교체	노후 보안등기구 교체	30,000
	가로등관리번호표찰설치	가로등관리번호표찰부착	85,560

□ 추 진 계 획

◦ 가로등․보안등 단가설계 및 계약의뢰   ------------------------- 2017. 01

◦ 가로등․보안등 단가착공 및 사업시행 -------------------- 2017. 02 ~ 12

◦ 보안등 신규설치 현장조사 및 사업추진  ----------------- 2017. 02 ~ 07

◦ 가로등․보안등 단가 준공  ------------------------------------------- 2017. 12

□ 기 대 효 과

◦ 야간통행이 불편한 마을안길, 골목길 등에 조명시설개선 및 설치로         야간 보행자의 보행권 확보 및 야간 안전사고 예방