상수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2016 주요성과
□	2017 주요업무계획

비전 및 중점추진방향

	비 젼
안전하고 깨끗한 수돗물의 안정적 공급

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	보다 안전하고 깨끗한 생활용수 공급 방안 강구 자체 수돗물 목표 수질기준 설정운영 유수율 향상을 통한 공기업 경영 효율성 제고

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	정수시설 효율적 운영관리 및 상수원 수질관리 강화 상수관망 최적 관리 시스템 구축 수돗물 수질검사 등 시민참여 프로그램 운영

일   반   현   황

□ 기     구

											상 수 도 과
상 수 행 정				정 수 생 산						급 수 시 설					요 금				누 수 방 지						수 질 실 험

□ 정․현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별							비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구
정 원	43	1	1	9	13	11	6	2
현 원	42	1	1	9	24	2	3	2
증 감	△1				11	△9	△3

□ 사  무  분  장

◦	상수행정	:	상수도종합계획수립, 예산편성 및 결산, 입찰 및 계약, 공유재산관리
◦	정수생산	:	정수생산기획조정, 정수장시설물관리, 읍면배수지관리
◦	급수시설	:	상수도정비기본계획수립, 급․배수공사설계 및 감독, 공동주택저수조 청소, 간이상수도 및 소규모급수시설관리, 개인급수공사
◦	요 금	:	급수사용료조정, 수입예산정리 및 정산, 계량기교체, 체납요금징수, 물이용부담금 부과징수
◦	누수방지	:	누수방지 및 누수탐사기획, 노후관개량공사 및 감독, 누수탐사, 누수처보수, 상수도관망도 정리, 변류수리 및 교체
◦	수질실험	:	수도수질실험 기획, 상수원수질검사, 정수약품 구입관리, 상수원 보호구역관리, 수도꼭지 수질검사

□ 수돗물평가위원회 현황

(단위 : 명)

구 성	위 원				임 기	비 고
	공무원	시의원	교수	시민단체
10	2	1	2	5	2 년	남 4, 여 6

※ 근 거 : 수도법 제30조의1,  익산시 상수도급수조례 제48조

□ 상수도 급수인구 현황

(단위 : 명)

구 분	총인구	급수인구	보급율 (%)	비 고
계	300,966	297,746	98.9
도심권	237,276	236,944	99.9
읍면권	63,690	60,802	95.4

□ 상수도 급수시설 현황 [2016.11.30기준]

(단위 : ㎥/일)

구 분		시설용량 (㎥/일)	급 수 량 (㎥/일)	비 고
계		230,300	149,121
생 활 용 수	소 계	195,300	125,049	100%
	광 역	105,300	52,765	42%
	자 체	90,000	72,284	58%
공 업 용 수	자 체	35,000	24,072

□ 상수도 사용 현황

(단위 : 전, ㎥)

구 분 업 종	급수전수	월평균 사용량	비율(%)	비 고
계	60,936	3,321,740	100
가 정 용	47,097	1,628,352	49.0
일 반 용	13,105	592,163	17.8
산 업 용	601	343,903	10.4
대중탕용	42	14,814	0.4
전용공업용	91	742,508	22.4

□ 상수도 관로 현황

(단위 : ㎞)

계	도수관	송수관	배수관	급수관	비고
1,878.9	2.5	25.3	1,170.5	680.6

□ 상수도 시설 현황

시 설 명	개 소	시설용량	비 고
정 수 장	2	125,000㎥/일	신흥, 금강
배 수 지	5	55,500㎥	신흥, 금강, 금마, 팔봉, 삼기
가 압 장	2	48,600㎥/일	금마, 삼기
보조수원지	1	1,053,000㎥	신흥

2016 주 요 성 과

□  대구경 전자식 수도미터기 전환

○ 사업기간 : 2016. 10. ~ 계속사업

○ 전환대상 : 365전(75mm 이상 중 내용년수 6년이 경과한 수도미터기)

○ 전환실적(38전) : 75mm(16전), 100mm(10전), 150mm(11전),300mm(1전)

○ 기대효과

□ 정밀도 높은 전자식 수도미터기 전환으로 세입증대 기여

□ 계기판을 외부에 노출 설치함으로써 검침 시 안전성과 편리성 도모

□ 유수율 제고사업 추진 경영개선 기반 조성

○ 상수도 노후관 교체/소규모 누수처 복구 : 12개소 7.2km/730개소

○ 관내 변류정비 및 교체 251개소

□  효율적 검침 및 부과․징수로 경영 효율화 제고

○ 정확한 검침으로 투명한 부과체계 확립 : 검침원 교육 12회

○ 상수도 체납요금 징수반 편성운영으로 징수율 제고 : 징수율 99.0%

□ 상수도 시설개선 등을 통한 안정적 급수체계 구축

○ 급수구역 확장공사 추진   :  2개소 2.1km

○ 급․배수관 개선공사 추진 : 72개소 7.8km

□ 상수도 생활민원 적극해소로 시민불편 최소화

○ 급수장치 수선 공사       : 1,430건

○ 공공 상수관로 누수탐사/수용가 옥내누수 탐사 : 45건/1,230건

○ 상수도부설도로 노면정비공사 추진 : 27개소 14.0km

2 0 17  주 요 업 무

		상수도관망 최적화 사업
		급수구역확장 및 급배수관 민원공사
		안전하고 깨끗한 수돗물 공급
		상수도요금 고액체납자 행정조치강화
		낭산배수지 건립사업 기본 및 실시설계용역

1		상 수 도 관 망 최 적 화 사 업

□ 필  요  성

◦ 상수도관망의 효율적, 합리적 관리를 위하여 급수구역을 소블록으로 세분화 구축

◦ 불량 제수변 교체 및 시설물 정비 등을 통한 누수 및 수질오염 예방      ◦ 노후 상수도관 교체 정비로 시민에게 맑은 물 공급

ᷮ 사 업 개 요

◦유수율 제고사업

단 위 사 업 명	위 치	사 업 량	사업비 (백만원)	비 고
합 계			4,080
블록시스템구축	영등동, 마동, 신흥동, 부송동 일원	11개소	2,530
노후관 교체	영등동, 어양동, 신흥동 일원	2.4km	550
긴급 누수처 복구	관내 일원	800개소	800
변류 정비공사	〃	200개소	200

□ 추 진 계 획

◦ 블록시스템 구축(SH01블록~SH11블록, 11개소) -- 2017. 1. ~ 2017. 12.

◦ 노후관 교체(SH06블록, L=2.4km) ---------- 2017. 1. ~ 2017. 12.

◦ 긴급 누수처 복구 공사

▸상수도관 노후로 인한 누수발생시 긴급복구 ------- 발생시, 연중시행

◦ 변류 정비공사

▸노후 및 불량 변류(제수변, 소화전, 공기변 등)의 교체 -- 연중시행

2		급수구역 확장 및 급·배수관 민원공사

□ 필  요  성

◦ 장래 급수량 증가에 따른 관로 확장 및 지하수 오염 우려지역 수돗물 공급을 위한 배수관 설치

◦ 수압이 낮은 민원에 대해 급·배수관 확장 및 통합으로 시민불편 해소

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 12.

◦ 사업내용

구 분	위치	사업량	사업비 (백만원)	비고
합 계			1,214
급수구역 확장공사	함라면 진등마을	1.4km	98
	여산면 유점마을	1.5km	120
	함열읍 학선마을	1.2km	96
상수도 부설도로 노면정비공사	익산시 일원	8.0km	500
급·배수관 민원공사	익산시 일원	7.0km	400

□ 추 진 계 획

◦ 급수구역 확장 및 상수도 부설도로 노면정비 공사

▸ 현지조사 및 설계 ---------------------------- 2017. 01 ~ 03

▸ 공  사  기  간  ----------------------------  2017. 04 ~ 10

◦ 급·배수관 공사

▸ 수압저조로 인한 급수불출 민원 발생시 -------------- 연중시행

3		안전하고 깨끗한 수돗물 공급

□ 필  요  성

◦ 원·정수 수질관리 강화 및 정수장 시설의 안정적인 운영으로

시민에게 안전하고 깨끗한 수돗물 공급

◦ 수돗물 검사 등 시민참여를 통한 수돗물에 대한 신뢰도 향상

□ 현      황

구 분	시설용량 (㎥/일)	급 수 량 (㎥/일)	비 율 (%)
소 계	195,300	125,049	100
광역상수도	105,300	52,765	42
자체정수	90,000	72,284	58

□ 추 진 계 획

◦ 정수시설 안정적 운영관리 : 사전 점검 강화 및 효율적 시설 관리

▸ 배수지(6개소 18지), 침전지(2개소 8지) 청소 ----- 연         중

▸ 정수장 시설물 보수공사(신흥 및 금강)----------  2017. 03 ~ 06

▸ 금강 및 금마가압장 제어반 보강공사 -----------  2017. 03 ~ 05

▸ 신흥정수장 상황실 자동제어장치 교체공사 ------  2017. 03 ~ 06

▸ 신흥정수장 노후 녹화기 교체공사 --------------  2017. 04 ~ 06

▸ 익산시 정수시설물 정밀점검 및 내진성능평가 용역

(신흥, 금강, 금마, 팔봉) ----------------------  2017. 02 ~ 11

◦ 수돗물 수질검사 강화

▸원수수질검사강화

법정검사 (32개 항목)		수질검사 강화(36개 항목)
․월간 : pH 등 6개 항목 ․분기 : 질산성질소 등 26개 항목	⇒	․일 일 : pH 등 5개 항목 ․주 2회 : 대장균군 등 5개 항목 ․분 기 : 질산성질소 등 26개 항목

법 정 검 사		수질검사 강화
․일일 : pH 등 6개 항목 ․주간 : 일반세균등 7개 항목 ․월간 : 수은 등 58개 항목	⇒	․일일 : pH 등 6개 항목–2회 ․주간 : 일반세균 등 7개 항목– 2회 ․월간 : 수은 등 58개 항목–1회 ․분기 : 염화비닐 등 82개 항목–1회

▸정수 수질검사강화

◦ 수돗물 신뢰제고 신흥정수장 개방  : 시민, 단체, 학교, 어린이집 등

◦ 수돗물 안전홍보 품질보고서 배부  : 50,000부

◦ 상․하반기 민관합동 수질검사 : 년 2회

◦ 수돗물평가위원회 실시 : 년 2회

4		상수도 요금 고액체납자 행정조치 강화

□ 필  요  성

◦ 상수도 사용료 고액 및 상습체납자에 대한 재산압류, 단수 등 행정        조치를 강화하여 체납요금 징수로 공기업 재정운영 원활화 도모

□ 사 업 개 요

◦ 수전현황

합 계	가정용	일반용	대중탕용	산업용	전용공업용
60,936	47,097	13,105	42	601	91

◦  2017년 상수도요금 부과․징수

□ 2017년 요금부과 및 징수 목표액  : 27,935백만원 / 27,655백만원(99.0%)

□ 과년도 체납액             :    592백만원

□ 과년도 압류내역

재 산 압 류	징 수	체 납
101건/157,427천원	88건/140,669천원	13건/16,758천원

□ 추 진 계 획

◦ 상수도 체납요금 징수반 편성운영(4개반) -------------- 연 중

◦ 수도계량기 조사원(50명)담당구역 수도요금 징수 책임제 시행

□ 2회 체납 수용가 체납수도요금 안내 및 수도공급정지(단수)예고문 스티커 부착

□ 체납 수용가 단수 (단수시행 전 3회 이상 방문 및  전화 납부 촉구)

◦ 상수도 사용료 상습 체납자 행정 조치 강화

□ 상습체납자에 대한 강력한 행정처분 이행 : 토지 및 건물 등 재산압류

□ 30만원 이상, 3회 이상 체납자 단수 및 재산압류 : 수시

※ 기초생활수급자 등 사회적 약자에 대한 단수유예 및 납부독려(시민불편 최소화)

5		낭산배수지 건립사업 기본 및 실시설계 용역

□ 필  요  성

◦ 북․동부권의 향후 생활용수의 안정적인 용수공급, ㈜하림공장 증설 및 효율적인 수도시설 운영에 필요한 배수시설 구축(익산시수도정비기본계획 반영)

□ 사 업 개 요

◦ 용역개요  : V=8,200㎥

◦ 용역기간  : 착공일로부터 18개월

◦ 용 역 비  : 700,000천원(시비)

◦ 용역내용  : 기본 및 실시설계 1식

▸배수지(V=8,200㎥), 송수가압장, 송․배수관로 L=2.0km(D450~500mm)

▸행정절차 이행(도시계획시설결정, 교통성 검토, 사전재해영향성 검토 등)

▸용지도 및 용지보상조서 작성

□ 추 진 계 획

◦ 과업지시서 및 용역서 작성           : 2017.  1 ~ 2월

◦ 용역 계약 의뢰(조달청)	: 2017.  3월

◦ 용역시행                              : 2017.  4월 ~ 2018. 9월