하수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2016 주요성과
□	2017 주 요 업 무 계 획

비전 및 중점추진방향

	비 전
완벽한 하수처리로 시민이 쾌적한 도시환경 조성

		전 략 목 표
◦ ◦	하수처리 운영 효율 증대로 쾌적한 주거환경 제공 수질개선을 통한 악취없는 청정녹색도시로 시민만족 행정 구현

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	정화된 하수를 이용한 방류수 재이용 및 생태습지공원 조성 하수관거사업 추진으로 방류지역의 수질보전 효율적인 하수종말처리장 운영으로 예산절감 및 수질보전

일   반   현   황

□ 기          구

						하수도과
하수행정			하수시설			하수운영			생활하수			하수관리			지하수

□ 정  ․  현  원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별								비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능	계약
정 원	28		1	8	5	6	8	-	-
현 원	28		1	10	10	6	1	-	-
증 감	-		-	2	5	-	▵7

□ 사  무  분  장

◦	하수행정 :	하수행정종합계획수립조정, 하수도특별회계 현금출납 및 금고감독, 입찰 및 계약, 하수도사용료․원인자부담금 부과징수, 공기업평가 결산
◦	하수시설 :	하수정비기본계획 수립, 하수관거임대형민간투자사업(BTL), 오산 문화마을 하수관거 정비사업, 천서․왕궁지구 하수관거 정비사업, 화정 소규모마을 하수처리장 설치 사업, 유천생태습지 유지관리
◦	하수운영 :	하수슬러지 처리사업 추진, 공공하수처리시설 설치․개선․운영관리, 3산단 폐수종말처리시설 운영관리
◦	생활하수 :	개인하수처리시설 설치신고․준공․지도점검, 분뇨수집․운반업 허가 및 지도점검, 공중화장실, 배수설비협의
◦	하수관리 :	시내일원하수도공사, 하수생활민원처리, 주민숙원사업, 맨홀정비, 준설원 관리, 온천지구 지정 및 관리
◦	지 하 수 :	지하수개발이용 허가․신고․준공, 지하수관련업 등록 및 지도점검, 지하수 이용부담금 부과

□ 하수도 일반 현황

구 분		단 위	2016. 12.	비 고
시설	총인구	천명	302
	하수인구	천명	268
	보급률	%	88.6
하수처리	1일평균하수발생량	톤	118,501
	1일평균하수처리량	톤	116,030
	하수처리율	%	97.91
하수도 사용	개소수	전	38,351
	톤당 평균요금	원	292.95	2015년 말

□ 하수처리시설 현황

시 설 명	개 소	처리용량	비 고
계	27	139,521㎥/일
익산공공하수처리시설	1	100,000㎥/일	민간위탁 ((주) 전북엔비텍)
함열공공하수처리시설	1	6,000㎥/일	〃
북부공공하수처리시설	1	30,000㎥/일	〃
금마공공하수처리시설	1	1,100㎥/일	〃
여산공공하수처리시설	1	600㎥/일	직영
소규모 공공하수처리시설	21	1,671㎥/일	직영
분뇨처리장	1	150㎥/일	민간위탁 ((주) 전북엔비텍)

하수관거 정비사업 현황

구 분	위 치	사 업 량		사 업 비 (백만원)			2017년예산		사업 기간	공 정 율 (%)
		설계량	현시공량	계	국비 (70%)	지방비 (30%)	신청	반영
완 료 사 업	4개 사업	L=36.233km 1,153가구	L=36.223km 1,153가구	25,454	17,142	8,312
함열처리구역 하수관거 정비공사	용안면난포리 (신은지구)	L=10.0km 241가구	L=10.0km 241가구	7,368	5,157	2,211	-	-	11.01. ~16.04.	100
	낭산면삼담리 (북지지구)	L=6.9km 198가구	L=6.9km 198가구	5,855	4,099	1,756	-	-	11.01. ~15.12.	100
	성당면성당리 (성당지구)	L=5.7km 159가구	L=5.7km 159가구	3,223	2,256	967	-	-	11.01. ~15.07.	100
춘포처리구역 하수관거 정비공사	춘포면춘포리 석탄동	L=11.4km 506가구	L=11.4km 506가구	8,043	5,630	2,413	-	-	11.01. ~16.06.	100
춘포판문마을하수관거 정비공사	춘포면 판문마을	L=0.576km 32가구	L=0.576km 32가구	480	-	480	-	-	16.08. ~16.12.	100
함열처리구역(와리외2개소)하수관거 정비공사	함열 흘산 어양동 현영동	L=1.657km 17가구	L=1.657km 17가구	485	-	485	-	-	16.08 ~16.12.	100
진 행 중	3개 사업	L=64.1km 1,208가구	L=45.8km 517가구	35,322	24,725	10,597	5,113	5,113
천서왕궁지구 하수관거 정비공사	왕궁 온수리 (익산,금오,신촌농장) 춘포 천서리, 오산리	L=45.1km 854가구	L=35.8km 432가구	25,486	17,840	7,646	1,455	1,455	14.01. ~17.06.	79
화정지구 마을하수처리장설치공사	망성면 내촌리	L=10.4km 256가구 처리장120톤	L=10km 85가구 배관공사	5,464	3,825	1,639	-	-	14.01. ~16.12.	88
오산지구 하수관거 정비공사	오산면 신지리 광지외 3개마을	L=8.6km 98가구	실시설계 용역중	4,372	3,060	1,312	3,658	3,658	16.01. ~17.12.	실시 설계 90
2017년 신규사업	2개 사업	L=31.8km 3,381가구	-	31,136	21,095	10,041	2,000	2,000
남부2,3,북부2처리분구 하수관거 정비공사	인화동,동산동,중앙동,신흥동,영등1동,신용동	L=28km 3,000가구	-	30,136	21,095	9,041	1,500	1,500	17.01. ~19.04.	신규사업
금마3처리분구 하수관거 정비공사	금마면 기양리	L=3.8km 181가구	-	1,000		1,000	500	500	17.01. ~18.12.	신규사업
임 대 형 민자사업	2개 사업	L=186.4km 10,941가구	L=186.4km 10,941가구	129,419	129,419		14,431	14,431
06하수관거 임대형민자사업 (BTL)	신동, 남중동, 영등1동, 모현동, 황등면	L=86.5km 4,644가구	L=86.5km 4,644가구	59,883	59,883		7,054	7,054	11.05. ~31.05.	푸른 익산 환경 (주)
09하수관거 임대형민자사업 (BTL)	평화동, 송학동, 모현동, 남중동, 중앙동, 창인동, 인화동,신동	L=99.9km 6,297가구	L=99.9km 6,297가구	69,536	69,536		7,377	7,377	14.08. ~34.08.	청정 익산 (주)

2016 주 요 성 과

□『익산시 지하수 관리 조례』에 따른 지하수 이용부담금 최초 부과․징수

◦ 501개소, 101,965천원(9~12월 고지분)

□ 오․우수관 분리로 하수처리시설 효율개선

◦ 천서왕궁지구 하수관거 정비사업 추진

▸관거정비 35.8km, 배수설비 432개소

◦ 화정지구 소규모마을하수처리장 설치사업 추진

▸관거정비 10km, 배수설비 85개소

□ 공공하수처리장 최적운영을 통한 수질환경개선

◦ 총27개소(139,521㎥/일) 하수처리시설의 정상가동 및 유지관리

◦ 하수처리시설 적정운영 관리를 통한 처리효율 향상 및 수질오염 저감

□ 읍․면․동 소규모 하수도 시설공사 및 생활민원 신속처리

◦ 하수도 정비 27건 3.45㎞, 하수도기계준설 8건 2,204㎥

◦ 365일 누수 없는 비상대기 근무로 2,342건의 하수생활민원 처리

▸원활한 하수배제를 위한 맨홀 및 하수도 준설 1,147건, 파손 하수관로 복구 및 맨홀 단차조정 등 1,195건 실시

2017 주요업무계획

		남부2․3, 북부2처리분구 하수관거정비사업 오산 문화마을 하수관거 정비사업 하수처리시설 운영 관리 폐수종말처리시설 민간위탁 추진 읍․면․동지역 하수도 시설 및 준설공사 지하수 보조관측망 설치사업

1		남부2·3, 북부2처리분구 하수관거정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 인화동, 주현동, 동산동/신흥동/영등1동, 신용동 일원

◦ 규    모 : 오수관로 28km, 배수설비 3,200가구

◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2019년(3년간)

◦ 사 업 비 : 30,136백만원(국비 21,095/도비 904/시비 7,233/기타 904)

▸2017년 : 1,500백만원(국비 490/도비 21/시비 939/기타 50)

□ 추 진 계 획

◦ 실시설계용역 시행                         : 2017. 1. ~ 11.

◦ 행정절차이행(재원협의, 원가심사 등)        : 2017. 9. ~ 11.

◦ 공사 착공 및 준공                         : 2017. 12. ~ 2019. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 구 시가지역의 합류식 하수관망 및 노후화된 하수관거 정비, 배수설비 미설치 가구에 대한 배수설비 설치 등을 통해 하수처리시설 운영효율을 증대시키고, 주거 환경 개선에 기여

2		오산 문화마을 하수관거 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 오산면 신지리 광지, 옥포, 신석, 월포마을

◦ 규    모 : 오수관로 8.6km , 배수설비 98가구

◦ 사업기간 : 2016년 ~ 2017년(2년간)

◦ 사 업 비 : 4,372백만원(국비 3,060 / 도비 131 / 시비 1,053 / 기타 128)

▸2017년 : 3,658백만원(국비 2,560 / 도비 110 / 시비 860 / 기타 128)

□ 추 진 계 획

◦ 실시설계용역 완료                           : 2017. 1. ~ 2.

◦ 행정절차이행(재원협의, 원가심사 등)          : 2017. 3.

◦ 공사 착공 및 준공                           : 2017. 3. ~ 12.

□ 기 대 효 과

◦ 공공하수처리구역 확대로 수질오염을 저감하여 맑은 물 보전에 기여

◦ 농촌마을 하수도 보급 증대에 따른 주거환경 개선

3		하수처리시설 운영 관리

□ 시 설 현 황

◦ BTO 5개소(137,250㎥), 직영 22개소(2,271㎥)

시설명	용 량 (㎥/일)	위탁기간	위탁운영사
익산	100,000	′08. 6. 25. ~ ′28. 6. 24.	(주)전북엔비텍
익산북부	30,000	〃	〃
함열	6,000	〃	〃
금마	1,100	〃	〃
금강분뇨	150	〃	〃
여산	600	직영	1개소
소규모공공하수	1,671	직영	21개소 직영

◦ 사 업 비 : 15,145백만원(BTO 14,289, 시설개선사업 856)

□ 추 진 계 획

◦ 익산하수처리시설 원심탈수기 설치                  : 2017. 1. ~ 3.

◦ 소규모 공공하수처리시설(삼기간촌) 개선공사         : 2017. 3. ~ 5.

◦ 함열하수총인처리시설 여과기 변경 설치공사         : 2017. 3. ~ 6.

□ 기 대 효 과

◦ 시설개선공사로 방류수 수질기준 준수 및 하천 부영양화 방지로 하천 수질환경 개선

4		폐수종말처리시설 민간위탁 추진

□ 사 업 개 요

◦ 시 설 명 : 제3일반산업단지 폐수종말처리시설

◦ 위    치 : 익산시 낭산면 구평리 975 - 63

◦ 규    모 : 폐수종말처리시설(4,861㎡), 중계펌프장(575㎡)

◦ 처리구역 : 제3, 4일반산업단지 일원

◦ 처리용량 : 5,500㎥/일

◦ 사 업 비 : 779.5백만원(민간위탁금 770, 용역비 9.5)

□ 추 진 계 획

◦ 민간위탁 원가산정 용역 실시	: 2017. 2.

◦ 민간위탁 계약 심사 및 재위탁 시의회 동의             : 2017. 3.

◦ 민간위탁기관 적격자심사위원회 구성                   : 2017. 4.

◦ 민간위탁 운영사 선정 공고                            : 2017. 5.

◦ 민간위탁 운영업체 선정 및 위·수탁협약 체결          : 2017. 6.

□ 기 대 효 과

◦ 전문기술을 가지고 있는 민간기업의 창의성과 노하우를 활용하여 법정 방류수기준을 준수하고 시설의 안정적, 효율적 운영 및 책임성 확보

5		읍․면․동지역 하수도 시설 및 준설공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원

◦ 총사업비 : 2,180백만원(국비 500/시비 1,680)

▸모현동 노후 하수관로 정비공사(명시) : 500백만원

비굴착 암거(2m×2m) 보수보강, L=100m

▸소규모 주민숙원사업(16건)           : 1,577백만원

읍면동 하수도 시설공사 및 준설, 하수관로 및 초기우수시설 유지보수

▸읍면동 주민예산편성사업(12건)       : 103백만원

◦ 사업기간 : 2017. 1 ~ 11.

□ 추 진 계 획

◦ 사업대상지 현장조사 및 설계                      : 2017. 1. ~ 10.

◦ 공사 발주 및 사업 추진                           : 2017. 3. ~ 11.

□ 기 대 효 과

◦ 노후하수관로 침하 및 파손 구간을 정비하여 싱크홀 등을 사전예방

◦ 하수도 시설 유지관리(준설, 시설보수)로 주거환경 개선

◦ 주민숙원사업 시행으로 주민 편익 도모

6		지하수 보조관측망 설치사업

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 량 : 3개소(기존공 활용)

◦ 사업기간 : 2017. 3. ~ 2017. 8.

◦ 사 업 비 : 45백만원(시비)

◦ 사업내용 : 지하수자동관측시스템, 관측정 보호시설 펜스 등 설치

◦ 관측내용 : 지하수 수위, 전기 전도도, 수온

□ 추 진 계 획

◦ 설치사업대상지 조사                         : 2017. 1. ~ 3.

◦ 사업설계 및 발주                            : 2017. 3. ~ 5.

◦ 설치 및 준공                                : 2017. 5. ~ 8.

□ 기 대 효 과

◦ 적극적인 모니터링 기능 강화로 지역별 수위 및 수질자료 관리

◦ 데이터를 표준화하여 활용도 제고 및 지하수 관련 이슈 발생 시 활용