시민안전과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2016 주 요 성 과
□	2017 주 요 업 무 계 획
□	특 수 시 책

비전 및 중점추진방향

	비 전
안전한 익산 건설

		전 략 목 표
◦ ◦	재난예방 활동 강화 및 재난 발생시 신속한 복구로 시민의 재산과 인명피해 최소화

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦ ◦	예방중심의 재난안전관리 강화로 생활안전 확보 재난발생요인 사전파악 및 안전조치로 선제적 재난 사전예방 급변하는 안보상황에 맞춘 비상대비 업무수행으로 시민의 안전 확보 풍수해 사전대비 및 예방활동 전개로 인명과 재산피해 최소화 CCTV 운영을 통한 시민중심의 안전망 구축

일   반   현   황

□ 기        구

						시민안전과
안 전 총 괄			안 전 관 리				민 방 위					재 난 방 재				CCTV

□ 정 ․ 현  원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	21		1	5	6	4	5
현 원	20		1	7	4	4	4
증 감	△1			2	△2		△1

□ 사 무 분 장

담 당	업 무 분 장 사 항
안전총괄	안전 총괄업무 관리, 재난안전 관리정책 총괄 조정, 지역재난대책본부 및 재난현장통합지휘소 운영(사회재난), 안전관리계획 수립, 안전문화운동 및 안전교육 추진, 익산시 자율방재단 관리, 재난관리기금 운영, 안전도시 만들기, 재난안전상황실 운영
안전관리	재난현장통합지휘소 운영(자연재난), 대형사고 예방 및 시설물 안전진단, 특정 관리대상 시설물 안전관리, 배수장 관리, 국가재난관리 정비시스템 운영(NDMS), 재난 상황 대응계획 수립 운영(가뭄. 폭염 대책수립 등), 유도선 및 수상레저, 풍수해 피해 긴급 복구
민 방 위	국가 비상대비 훈련 추진, 통합방위협의회 및 방위지원본부 운영, 충무계획 수립,비상시 인적․물적 동원 자원관리, 주민 신고망 운영, 민방위 기본계획 수립, 민방위대원 교육훈련 실시, 민방위 비상시설 점검관리, 사회복무요원 관리
재난방재	풍수해예방 및 복구공사 설계․감독, 재해위험지구지정 및 정비사업 추진, 익산시 풍수해 종합계획수립 운영, 붕괴위험지역 지정 및 관리
CCTV	용도별 CCTV설치, 마을 방범용 CCTV설치, 통합관제센터 운영, CCTV 자료 관리 및 유지 보수

□ 특정관리대상시설 현황

(단위 : 개소)

구 분	관리대상 시 설 물	중점 관리대상				재난 위험시설
		계	A급	B급	C급	계	D급	E급
합 계	930	929	136	764	29	1	1
시 설 물	62	62	4	34	24
건 축 물	868	867	132	730	5	1	1

□ 재해취약시설 현황

(단위 : 개소)

구 분	계	대규모 공사장	배수펌프장	수 문	산사태	인명피해 우려지역
계	62	3	12	11	18	18

□ 민방위 시설장비 현황

시설명	경 보 사이렌	대피시설		비상급수		장비확보상황 (방독면)
		정부지원	민간․공공	정부지원	공공용 시설
개소	13개소	-	82개소	6개소	43개소	6,743점

□ CCTV 설치 현황

구 분	총 계	통합관제센터 관리					자체관리
		소 계	방 범 용	차량번호 판 독 용	아동용	어 린 이 보호구역	마을방범용
개 소	825	387	164	31	83	109	438
대 수	2,413	968	353	63	170	382	1,445

□ 위원회 현황

계	통합방위협의회	안전 관리 위원회	재난관리기금 운용심의위원회	사전재해영향성검토 위원회
4개/ 57명	10명	17명	9명	23명
	▸의장 : 익산시장 ▸위원 : 경찰서장 등 유관 기관장(9명)	▸위원장 : 익산시장 ▸위 원 : 안전행정국장 및 유관기관(16명)	▸위 원 장 : 부시장 ▸부위원장 : 안전행정국장 ▸위 원 : 해당부서장, 교수 등(7명)	▸위원장 : 안전행정국장 ▸위 원 : 교수 등(22명)

2016 주 요 성 과

□ 성      과

◦ 재난대비 안전점검 및 안전문화 교육 실시로 안전도시 조성

▸국가안전대진단 추진(2월~4월)

- 1,982개 시설물 / 현장조치 79, 보수보강 103, 정밀진단 4

▸재난대응훈련 추진

- 안전한국훈련(5월) / 유람선 충돌‧화재 / 29개 기관‧단체 461명

- 대테러 및 화재붕괴(10월)/21개 기관‧단체 400명

▸안전점검의 날 운영(매월 4일) : 12회 / 700여명, 홍보물 25,000부

▸찾아가는 맞춤형 안전문화교육 실시(5월~9월)

- 48개 초･중･고 7,542명 / 교통, 전기, 가스안전, 심폐소생술

◦ 국가비상대비 훈련 및 민방위 대원 교육 실시

▸비상대비훈련 : FE(독수리)훈련(3월), 을지연습(8월), 화랑훈련(9월)

▸민방위훈련 : 소방차 길 터주기, 화재대피훈련, 지진대피훈련, 화학물질 누출훈련, 민방공 대피훈련 등

▸민방위대원교육 : 기본교육(5 ~ 6월), 보충교육 3회(9 ~ 12월)

◦ 침수피해 대비 및 재해위험지구 정비사업 추진

▸모현지구 우수저류시설 설치사업	: 지장물 철거 및 토공완료

▸삼양 재해위험지구 정비사업	: 배수로정비 1.02km, 수문설치

▸급경사지 정비사업(천일지구 외 3개소)	: 준공완료

◦ CCTV 통합관제 센터 운영으로 시민의 생명과 재산 보호

▸용도별 CCTV 설치 완료 : 96개소 / 297대

- 통합관제센터 : 63개소 / 191대     - 마을관리 : 33개소 / 106대

2017 주요업무계획

		재난 예․경보시설 구축사업 유천배수펌프장 노후펌프 교체 모현지구 우수저류시설 설치사업 입점4지구 급경사지 정비사업 통합관제센터 운영 및 CCTV 설치

1		재난 예·경보시설 구축사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간  :  2017. 1. ~ 2017. 12.

◦ 사업내용  :  자동음성통보시스템 및 재해문자전광판 설치

▸자동음성통보시스템 설치 : 38개소

- 재난 상황시스템과 마을앰프를 연계하여 신속한 재난상황 전파

(만경강, 금강, 목천포천 변 홍수범람 우려지역)

▸재해문자전광판 설치 : 1개소

- 재해문자전광판을 활용하여 기상정보 및 재난상황 전파

(영등동 무왕로 변 주요사거리 선정)

◦ 사 업 비  :  290백만원(도 기금 145,  시 기금 145)

□ 추 진 계 획

◦ 현장조사 및 설계	:   2017. 01. ~ 2017. 02.

◦ 공사착공 및 준공	:   2017. 03. ~ 2017. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 최근 이상기온 현상으로 인한 국지성 집중호우 및 태풍․지진으로 인한 돌발적 홍수, 범람, 파손으로부터 시민의 생명 및 재산 보호

2		유천배수펌프장 노후펌프 교체

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  :  유천 배수장(익산시 중문천길 368)

◦ 사업기간  :  2017. 1. ~ 2017. 12.

◦ 사업내용  :  노후펌프(425Hp) 교체 2대

▸펌프 8대중 2대 교체

◦ 총사업비  :  700백만원(특별교부세)

□ 추 진 계 획

◦ 현장조사 및 설계	:  2017. 01.

◦ 계약심사 등 행정절차 이행	:  2017. 02.

◦ 공사발주	:  2017. 02.

◦ 펌프 제작 및 설치, 시운전	:  2017. 03. ~ 06.

□ 기 대 효 과

◦ 지속적인 배수펌프장 관리로 국지성 집중호우에 대비하고 배수펌프 가동 불량으로 인한 인명과 재산피해 예방

3		모현지구 우수저류시설 설치사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  :  모현동 1가 180번지 일원 (모현주민센터 뒤편)

◦ 사업기간  :  2014년 ~ 2017년 (4년간)

◦ 총사업비  :  16,523백만원 (국비 8,262,  도비 2,478,  시비 5,783)

※ 16년까지 사업비 100%확보 (1차분 12,000  2차분 4,523)

◦ 사업내용  :  우수저류시설 1개소 (저류용량 15,000㎥)

□ 추 진 현 황

◦ 공사계약 및 착공	:    2015. 07.

◦ 지장물 철거 완료	:    2016. 05.

◦ 지하 터파기 및 가시설 완료	:    2016. 11.

▸추진공정률 : 40% (지하 부력방지 앵커 시공 중)

◦ 공사 일시 중지 (동절기)	:    2016. 12.

▸모현동 주민센터 신축에 따른 보강 설계

□ 추 진 계 획

◦ 공사 보강 설계 완료	:    2017. 02.

◦ 공사 재착공	:    2017. 03.

◦ 공사 추진  및 준공	:    2017. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 집중 호우시 상습침수지역에 대한 우수저류시설을 설치하여 침수예방 및 시민의 생명과 재산 보호

4		입점4지구 급경사지 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  :  익산시 웅포면 웅포리 산165-5번지 일원

◦ 사업기간  :  2017. 01 ~ 2017. 12.

◦ 총사업비  :  2,000백만원 (국비 1,000, 도비 500, 시비 500)

※ 2017년 국비확보 855백만원 (잔여사업비 145백만원 추경확보)

◦ 사업내용  :  급경사지 정비 4,000㎡ (피암터널 설치 L=80m)

□ 추 진 현 황

◦ 급경사지 낙석사고 발생	:    2016. 04.

◦ 국민안전처 국가예산지원 사전 협의	:    2016. 04.

◦ 급경사지 붕괴위험지역 지정	:    2016. 05.

◦ 실시설계 발주	:    2016. 08.

◦ 국비보조사업 확정 가내시	:    2016. 10.

□ 추 진 계 획

◦ 공사 실시설계 사전설계 심의(전라북도)	:    2017. 01.

◦ 공사 원가심사(전라북도)	:    2017. 02.

◦ 공사 발주 및 착공	:    2017. 03.

◦ 공사 추진 및 준공	:    2017. 12.

□ 기 대 효 과

◦ 군도 30호선(입점 고분전시관 인근) 절토사면 집중호우시 낙석발생 방지 및 도로이용자들의 교통안전 확보

5		통합관제센터 운영 및 CCTV 설치

□ 사 업 개 요

◦ CCTV 통합관제센터 24시간 모니터링 민간위탁

▸운영방법 : 모니터링 9명 (3조 2교대 근무), 경찰 3명 협업

▸사 업 비 : 529백만원 / 2년 (2017년 예산 273백만원)

▸위탁기간 : 2016. 02. ~ 2018. 01.

◦ CCTV 통합관제센터 유지보수 관리 (전산장비 및 회선)

▸968대 (방범 353, 차량판독 63, 아동보호 170, 어린이보호 382)

▸사 업 비 : 194백만원

▸사업기간 : 2017. 03. ~ 2018. 02.

◦ 용도별 CCTV 설치

용 도 별	사업량(개소/대)	위 치	사업비(백만원)	비고
계	59 / 170		829
방 범 용	37 / 111	관내 우범지역	740
마 을 용	22 / 59	함열읍 등 6개 읍면동	89

□ 추 진 계 획

◦ 통합관제센터 24시간 모니터링 민간위탁 실시	: 2017. 01. ~ 12.

◦ CCTV 및 통합관제센터 유지보수 관리

▸용역계약 및 유지관리	: 2017. 03. ~ 2018. 02.

◦ 용도별 CCTV 설치	: 2017. 01. ~ 10.

□ 기 대 효 과

◦ 24시간 모니터링으로 실시간 범죄예방 및 각종 사건․사고시 신속한 처리

◦ 용도별 CCTV 설치로 범죄 예방 및 주민의 생명과 재산보호

특수시책

		통합관제 CCTV 지능형 안심벨 설치

1		통합관제 CCTV 지능형 안심벨 설치

□ 사 업 개 요

◦ 대    상  :  기존 통합관제 CCTV 활용(시범설치 10개소)

◦ 사업내용  :  통합관제 CCTV에 보고·듣고·말하는 지능형 안심벨 설치

▸범죄 취약계층(아동, 여성) 긴급 상황 발생 시 피해 예방

▸청소년 비행(음주, 흡연) 쓰레기 무단투기 등 계도 안내 방송 활용

◦ 사 업 비  :  10,000천원

◦ 사업기간  :  2017. 01. ~ 2017. 07.

□ 추 진 계 획

◦ 지능형 안심벨 설치

▸실  시  설  계	:   2017. 01. ~ 02.

▸착 공 및 준 공	:   2017. 03. ~ 07.

◦ 시범운영 실태 점검 및 확대설치 검토	:   2017. 07. ~

□ 기 대 효 과

◦ 실시간 범죄예방 및 각종 사건․사고 시 신속한 대응체계 구축

◦ 지능형 안심벨 설치로 범죄로부터 취약계층 보호 및 비행청소년 계도 활동