건  설  과

	□		감사자료 과 공통사항
			1.	2016년도 업무성과 및 반성 ……………………	59
			2.	2016년도 예산집행 및 추진사항 ……………	60
			3.	2016년도 행정사무감사시 지적사항에 대한 조치 결과 ……	62
			4.	2016년도 상급기관 감사시 지적사항 및 조치 결과 ……	67
			5.	시정질문에조치 결과 …………………………	68
			6.	주요사업 조서(3천만원 이상) …………………	70
			7.	2016년도 각종 민원(진정․건의․청원 등) 접수 처리내역 …	71
			8.	기금 운용 관련 …………………………………	72
			9.	위원회(자문위원회 포함) 운영 관련 ……………	73
			10.	용역사업 관련 ……………………………………	74
			11.	인허가민원관련 ……………………………………	75
			12.	각종공사설계변경상황 …………………………	76
			13.	건설공사집행현황(3천만원이상) ………………	78
			14.	민간에대한보조금집행내역 ………………………	80
			15.	국․도비 보조사업 집행현황(1억원이상) ………	80
			16.	2016년도 명시 및 사고이월사업비 집행 내역 …	81
			17.	2016년도 예산중 2017년 명시 및 사고이월내역 ……	82
			18.	예산전용 사항 및 예비비 집행 현황 …………	83
			19.	공사 준공기한 연장 내역 ………………………	83
			20.	국․도비 예산중 사업 미시행으로 전액 반납한 예산현황 …	84
			21.	국․도비 반납 현황 ………………………………	84
			22.	2016년도 계획사업중 미착공사업 현황 ………	85
			23.	2016년도 계획사업중 유보 및 취소된 사업현황 ……	85
			24.	2016년도 이월사업중 유보 및 취소된 사업 ………	86
			25.	2016년도 예산편성후 전액 미집행 내역 ………	86
			26.	소송사건현황 ………………………………………	87
			27.	시홈페이지에서 접수된 민원처리 현황 ………	88

	□		감사자료 과 요구사항
			1.	공익사업을위한용지보상	………	91
			2.	2016년도 시군도·농촌도로 확·포장사업	………	92
			3.	평화육교 재가설 사업	………	94
			4.	군도23호선 확장사업	………	95
			5.	왕궁천하천환경정비사업	………	96
			6.	소하천정비사업(오동정천,외산천)	………	97
			7.	금강생태하천기본계획실시설계	………	98
			8.	국가하천유지관리사업	………	99
			9.	지방하천정비	………	100
			10.	도로조명시설 조도개선	………	101
			11.	도로조명 고장민원 처리내역	………	102
			12.	가로등시설 실명제 추진	………	103
			13.	2016년도 읍면동별 가로등 보안등 신규 설치현황	………	104

감사자료 과 공통사항

1. 2016 업무성과 및 반성

확인자	:	건설과장		김 중 만	□
작성자	:	건설행정계장		나 진 우	□
작성자	:	도로시설계장		배 진 호	□
작성자	:	하천시설계장		황 기 덕	□
작성자	:	하천관리계장		양 기 주	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

▣ 성    과

◦ 평화육교 재가설로 호남선 KTX 완전개통과 안전한 교통망구축

▸평화육교 재가설에 따른 한국철도시설공단과 협약체결, 설계용역 착수 및 추진

◦ 농어촌도로 확포장으로 차량통행 불편해소 및 기계화 영농기반 구축으로 주민편익 증대(3개노선 준공)

▸ 여산 신리~호월간 도로확포장공사

- 도로확포장 L=1.4㎞, B=8.0m

- 도로확포장 준공 및 개통 : 2016. 6. 22

▸ 함라 수동~금곡간 도로확포장공사

- 도로확포장 L=1.11㎞, B=8.0m

- 도로확포장 준공 및 개통 : 2016. 6. 22

▸ 성당 삼회선 도로확포장공사

- 도로확포장 L=1.38㎞, B=8.0m

- 도로확포장 준공 및 개통 : 2016. 7. 29

◦ 자연과 생명이 살아 숨쉬는 친환경을 우선으로 하는 하천 정비로 재해예방 및 시민 친수공간 조성

▸ 외산천 하천환경정비사업 : 2016. 07월 사업완료

▸ 소하천 정비공사

- 오동정천 : 교량 4개소 설치, 호안정비 1.4Km완료 (공정율 70%)

- 외산천 : 교량 3개소 설치, 호안정비 등 완료 (공정율 100%)

◦ 보안등 설치로 밝은거리 조성하여 여성,노약자 등에게 안전한 보행 환경조성

▸보안등 신규설치 365개소, 노후가로등 정비 155개소, 가로등,보안등 민원처리 4,402건

2. 2016 예산집행 및 추진사항

확인자	:	건설과장		김 중 만	□
작성자	:	건설행정계장		나 진 우	□

2016 12. 31현재                                                                (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율 (%)	비고
건설과				19,235,588	11,389,989	7,845,599	59.2
	도로시설관리			13,697,949	7,344,161	6,353,788	53.6
		시군농어촌도로확포장		4,869,667	3,729,480	1,140,187	76.5
			함열용성철도건널목입체화사업	102,942	92,632	10,310	89.9
			용동 삼정~두무간 도로확포장공사	788,593	130,383	658,210	16.5	명시이월
			미불용지매입비 (시군도농어촌도로)	382,474	382,474	0	100
			여산 신리~호월간 도로확포장공사	512,189	449,977	62,212	87.8
			춘포학연익산천제방간도로확포장	150,000	91,909	58,091	61.2	명시이월
			오산 북영선(금몽~남전)확포장공사	698,615	393,234	305,381	56.2	명시이월 281,089 사고이월 24,291
			부사관학교~상옥마을간교행장소설치	100,000	93,808	6,192	93.8
			성당 삼회선(성당우회도로) 도로확포장공사	723,606	704,007	19,599	97.2
			군도23호선도로확포장공사	1,100,000	1,093,479	6,521	99.4	명시이월
			함라 수동~금곡간 도로확포장공사	308,248	294,577	13,671	95.5
			시군농어촌도로확포장 사업추진	3,000	3,000	0	100
		철도건널목개량사업		5,600,000	497,000	5,103,000	8.8
			평화육교재가설	5,600,000	497,000	5,103,000	8.8	명시이월

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율 (%)	비고
		도로조명시설관리		3,188,642	3,078,041	110,601	96.5
			보안등신규설치	435,364	405,208	30,156	93.0	명시이월 30,000
			노후가로등정비	175,580	174,186	1,394	99.2
			가로등보안등유지관리	2,515,038	2,437,342	77,696	96.9
			가로등보수차량운영유지비	18,660	18,660	0	100
			주민편익증진사업보안등	44,000	42,645	1,355	96.9
		주민숙원사업		39,640	39,640	0	100
			주민숙원사업	39,640	39,640	0	100	공통여비및업무추진비
	하천정비			5,424,695	3,935,418	1,489,277	72.5
		하천정비및유지관리		5,424,695	3,935,418	1,489,277	72.5
			하천제방유지보수	72,671	65,772	6,899	90.5	명시이월
			하천제방유지보소(자체)	470,951	166,946	304,005	35.4	명시이월
			국가하천유지관리	608,000	488,280	119,720	80.3	명시이월 104,221
			소하천정비	3,244,908	3,011,788	233,120	92.8	명시이월 사고이월
			국가하천유지관리(4대강외)	115,000	40,688	74,312	35.3	명시이월
			왕궁천하천정비사업	778,426	32,050	746,376	4.1	계속비이월
			지방하천기본계획수립	34,739	34,739	0	100
			지방하천정비	100,000	95,155	4,845	95.1
	재무활동(보전지출)			50,000	50,000	0	100
	행정운영경비			62,944	60,410	2,534	95.9
			인력운영비	35,000	32,466	2,534	92.7
			기본경비	27,944	27,944	0	100

3. 2016 행정사무감사 사항 조치결과

확인자	:	건설과장		김 중 만	□
작성자	:	건설행정계장		나 진 우	□
작성자	:	도로시설계장		배 진 호	□
작성자	:	하천시설계장		황 기 덕	□
작성자	:	하천관리계장		양 기 주	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

연번	시정․개선사항	조치 (처리) 결과	비고
1	•명시이월 ▸건설과 추진 사업중 명시이월이 너무 많이 발생되고 있는데이것은 예산편성을 잘못한 결과이므로 향후에는 효율적인 예산편성이 될 수 있도록 노력하기 바람	▸소하천정시사업의 본예산 집행계획은 적정히 집행하였으나 국민안전처 재해예방사업 국가예산을 2015연말에 추가 확보로 이월추진함. 추후 이월되지 않도록 사업추진에 만전을 기하도록 하겠음.
2	•설계변경 ▸최초 설계할 때 예측가능한 부분을 반영하여 설계해야 함에도 설계변경이 많은 것은 아쉬운 점으로 판단되므로 설계변경 최소화 하도록 노력하기 바람.	▸민원사항에 의한 현장여건 변화로 불가피하게 설계변경을 시행하였으나, 앞으로는 사전에 파악하여 설계단계부터 반영하여 설계변경이 최소화 될 수 있도록 노력하겠음.

연번	시정․개선사항	조치 (처리) 결과	비고
3	•삼성동 하나로~외화간 도로확·포장공사 ▸사업추진이 오래되었음에도 보상율이 63%밖에 되지 않은 상태에서 사업이 중단되어 민원이 발생되고 있는 반면, 신규사업은 계속 늘어나고 있으므로 신규사업을 억제하기 바라고 기존 사업예산을 우선 편성하여 마무리 하기 바람.	▸2012년부터 국비(도로보전분 교부세)중단으로 예산 확보가 원활하지 않아 공사 및 용지매입이 장기간 소요되고 있어 공사준공을 앞둔 현장 순으로 예산을 집중투자하여 사업을 마무리하고 있는 실정임.
4	•자체설계단 운영 ▸각종 용역에 많은 예산이 지출되고 있는데 몇 년전에는 자체설계단을 운영하여 몇 억원의 용역비를 절감한 경우가 있으므로 기술직 공무원을 활용한 자체설계단을 구성․운영하여 용역비를 절감하기 바람.	▸도로관리과에서 주관으로 주민숙원사업에 대하여 매년 자체설계단을 구성 및 운영하고 있으며, 기술직 공무원들이 자체적으로 설계하여 용역비를 절감하고 있음. ▸건설과에서는 기술용역이 어려운 시.군도 도로확.포장 및 하천정비 사업에 대하여 기술용역을 시행하고 있음.

연번	시정․개선사항	조치 (처리) 결과	비고
5	•익산IC~팔봉간 지방도 확장공사 ▸전라북도에서 추진하는 구간의 공사율이 매우 저조하여 통행에 불편을 초래하고 있으므로 전라북도와 적극 협의하여 조속히 추진하기 바람.	▸본 사업은 전북도에서 시행하는 사업으로 계획대로 차질 없이 추진 될 수 있도록 전라북도청 및 도의원에게 지속적으로 건의하고 있는 실정임.
6	•용지보상 협의 철저 ▸사업의 원활한 추진을 위해 용지보상이 매우 중요하나 토지매입을 위한 노력이 부족하다 판단되므로 더욱 적극적으로 보상 협의하기 바람.	▸미협의자 개별방문 및 전화면담으로 집중 독려하고, 원거리거주자에 대하여 왕복 우편이용 보상협의 계약 등 적극적인 보상협의를 추진하겠음.
7	•가로등 ▸LED 가로등 보안등 교체로 인한 전기사용량 및 요금, 교체비용 등에 대한 비교 검토하여 효율적인 가로등이 설치 될 수 있도록 노력하기 바람.	▸LED제품은「에너지이용합리화법」 제8조 및 동법 시행령 제15조에 따라 2017년부터 공공기관에서 설치되는 모든 조명등에 대하여는 100% LED제품으로 설치하도록 되어 있어, 신규 설치는 LED로 설치하여 에너지 절감에 기여하고 있음.

연번	시정․개선사항	조치 (처리) 결과	비고
8	•가로등 ▸가로등 설치 민원이 매년 증가되고 있는데 가로등 총량제 등 방안을 강구하기 바람	▸가로등 설치는 읍면동 주민참여예산 및 시책업무추진비를 활용하여 설치되는 사업으로 가로등 총량제실시를 위하여는 연간 읍면동별 설치수량 한도기준 을 정한 후 이를 조례와 규칙을 제정명문화 하는 등 다각도로 방안을 강구토록 하겠음
9	•가로등 ▸우리시는 보안등 1개소당 100만원정도의 설치비가 소요되는데 반해 다른 자치단체의 설치단가는 70만원 정도 소요된다는 얘기가 있으므로 비용단가를 철저히 검토하여 예산을 절감하기 바람.	▸ 1개소당 70만원 정도로 설치되는 보안등은 과거에 보편적으로 설치되어온 일반램프제품이며, 2013년 이후 설치되는 보안등에 대하여는 LED제품으로 설치하고 있으며, 최소설치단가는 100만원정도 소요됨.
10	•하천정비사업 ▸탑천 상류부에 대한 정비사업으로 인해 우기시 우수도달시간이 빨라져 빗물이 한꺼번에 탑천으로 몰려 하류지역의 피해가 가중되고 있는 실정으로 피해방지를 위한 대책을 마련하기 바람.	▸탑천 하천정비사업은 대단위 사업으로 국가 예산확보가 필수적으로 국토관리청 및 전라북도에 건의하여 조속한 사업이 추진될 수 있도록 노력하겠음

연번	시정․개선사항	조치 (처리) 결과	비고
11	•하천정비사업 ▸하천정비사업에 많은 예산이 투자되고 있으나 집중호우 등 시간당 강수량이 증가되고 있어 하류지역에 피해를 줄 수 있으므로 철저히 대비하기 바람. ▸용안, 용동, 망성 지역이 집중호우로 피해가 발생되었는데 하천관리에 만전을 기해 주기 바람.	▸2017년 본예산에 하천유지관리비를 최대한 확보 될 수 있도록 노력 하겠으며, ▸집중호우 등 강수량이 증가하기 전에 하상 준설 및 수초제거 사업을 조기에 추진하여 피해가 발생하지 않도록 하천유지관리에 최선을 다하겠음
12	•시홈페이지 접수민원 ▸시홈페이지에 접수된 민원을 전부 처리한 것으로 보고 하였는데 민원이라 하더라도 타당성 및 목적성등을 검토한후 처리하기 바람	▸시홈페이지에 접수되는 민원은 단순 민원으로 처리완료 하였으며, 향후 민원처리 목적에 맞게 민원인과 상담하여 맞춤형 민원처리에 만전을 기하도록 하겠음.

4. 2016 상급기관감사 지적사항에 대한 조치 결과

확인자	:	건설과장		김 중 만	□
작성자	:	건설행정계장		나 진 우	□
작성자	:	도로시설계장		배 진 호	□
작성자	:	하천시설계장		황 기 덕	□
작성자	:	하천관리계장		양 기 주	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

연번	공 사 명	지적사항	조치 (처리) 결과	수감기관	비고

상급기관감사 지적사항이 없습니다.

5. 시정질문에 대한 조치결과

확인자	:	건설과장		김 중 만	□
작성자	:	도로시설계장		배 진 호	□
작성자	:	하천시설계장		황 기 덕	□

【관리번호 : 건설과 196 –1 - 3】

연번	질문요지	조치(처리) 결과	비고
1	•평화육교 재가설에 따른 대체도로 개설방안 ▸지역주민은 평화육교 재가설 기간에 임시도로 개설을 주장하고 있는데, 이에 대한 집행부 의견과 만약 가설도로가 어렵다면 평동로(오산방향)에서 국도23호선과 연결램프 설치방법 검토요망	▸평화육교 재가설 사업기간중 임시 도로(가교) 설치는 100억원 정도 추가 비용이 발생할 것으로 예상되어 시 재정여건상 반영이 어려움 ▸평화육교를 이용하는 차량의 교통통행 분산을 위하여 인근 3개노선을 우회도로로 활용하고 평동로(오산방향)에서 국도 23호선으로 진입이 가능한 연결램프를 설치하겠음 〈우회도로 활용 - 3개노선〉 -노선1(시내버스 및 소형차) :목천로~대간선수로 임시교량설치~평화제일A 앞 -노선2(대형차량 및 직행버스) :번영로~23번국도(현재 25톤이상 이용중) -노선3(기타차량) :만경강제방~유천마을~인화동 〈국도23호선 연결램프〉 -예산확보 : 300백만원 -실시설계 : 2017. 2~현재 -공사착공 : 2017. 5(예정) -공사준공 : 2017. 12(예정)	김용균 의원

【관리번호 : 건설과196 - 4 – 1】

연번	질문요지	답변내용(조치결과)	비고
2	•침수피해 해결방안 및 기관 및 부서협의 미흡 ▸금년 자연재해시 침수피해에 대한 문제해결방안과 농어촌공사와 익산시간 협력 및 공유가 미흡한 문제에 대하여	◦금번국지성호우360mm이상많은 비침수피해발생 ▸침수피해현황 : 농경지 침수 10건 70ha, 비닐하우스 40건 21ha ◦ 경지정리 구역 - 농어촌공사에서 배수로, 수문조작 관리 미흡 ◦ 장마철 이전에 배수로정비, 풀베기 등을 실시 하여야 하나, 사전대비 미흡 ◦ 우리시 금년 지방, 소하천유지관리비 112백만원을 확보하였으나 절대 부족 ◦ 국가하천, 지방하천, 소하천 등 유지관리비를 최대한 확보 하여 하천준설 및 하상수초 제거 추진 ◦ 농어촌공사와 익산시 긴밀히 협조하여 비상근무 체계유지, 배수로정비 및 수문관리로 침수피해 대책마련 ◦ 하천정비에 필요한 국가예산 확보하여 하천정비를 하겠음	조남석 의원

6. 주요사업 조서(3천만원 이상)

확인자	:	건설과장		김 중 만	□
작성자	:	건설행정계장		나 진 우	□
작성자	:	도로시설계장		배 진 호	□
작성자	:	하천시설계장		황 기 덕	□
작성자	:	하천관리계장		양 기 주	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

항목 13. 건설공사 집행현황과 같습니다.

7. 2016년도 각종 민원(진정) 접수처리내역

확인자	:	건설과장		김 중 만	□
작성자	:	건설행정계장		나 진 우	□
작성자	:	도로시설계장		배 진 호	□
작성자	:	하천관리계장		양 기 주	□

종류	건 명	민원인	요구내용	처 리 내 용
계	4건
진정	-보상요청	이종렬	-왕궁면 흥암리 산63-1(도)496㎡에 대한 보상 요청	-「전라북도에서 시행하는 지방도 개설공사에 편입된 토지로서,현재는 우리시가 관리하고 있는 법정도로 」군도19호선」내의 미보상토지로 판단되는바, 귀하께서 보상 요청하신 토지에 대해 관련 예산등에 대한 검토를 통하여 보상이 이루어 질수있도록 처리할 계획임을 통보
진정	- 진입로 확포장 요망	오산면외검마을 이원권이장(주민일동)	-외검마을 진입로 확포장 요망 (오산리도210호)	-농어촌도로는 국비지원이 중단되어 전액 시비로 추진하고 잇어 시재정 여건상 신규사업을 자제하고 있는 실정임 신규,또는 중단된 사업은 현재 추진중인 농어촌도로 정비사업(23개소)를 마무리후 재정여건을 고려하여 연차적으로 검토 추진예정임.

진정	-토사관련	최원상	-낭산면 성남리718번지 내에 있는 수로가 장마에 토사가 밀려와 물이 내려가지 않음.	-낭산면 성남리 앞 878번지의 하천의 경우 현재 외성천으로 지정이 되어 있으며,농번기가 끝난후 하천 준설을 통하여 토사를 제거, 유수유통에 지장이 가지 않도록 하겠음.
진정	-진입로개설공사	박지열	-성당초등학교 진입로개설공사에 편입된 건물 거주자에 대한 이사비용 청구	-주거용 건축물의 거주자 에 대하여 이사비용을 지급할수 있게 되어있음. .주민등록법상 주민등록 여부 .거주사실확인서등 인근주민들의 거주확인 .전기요금 등 생활비를 입증할수있는자료 -민원께서 제출하신 거주사실확인서의 내용만으로는 주거용 건축물의 거주자로 판단하기 어려워 이사비 청구에 대해서는 지급이 불가함을 안내함

8. 기  금   운  용

확인자	:	건설과장		김 중 만	□
작성자	:	건설행정계장		나 진 우	□
작성자	:	도로시설계장		배 진 호	□
작성자	:	하천시설계장		황 기 덕	□
작성자	:	하천관리계장		양 기 주	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

기금운영 사항이 없습니다.

9. 위 원 회 운 영

확인자	:	건설과장		김 중 만	□
작성자	:	하천시설계장		황 기 덕	□

위 원 회 명	설 치 근 거	구성원수	심의․의결․자문 기능여부	비 고
소하천관리위원회	소하천정비법 제26조 (익산시 소하천관리위원회 운영 규정)	9	심의

10. 용   역   사  업

확인자	:	건설과장		김 중 만	□
작성자	:	도로시설계장		배 진 호	□
작성자	:	하천시설계장		황 기 덕	□
작성자	:	하천관리계장		양 기 주	□

일자	사 업 명	사업개요	예산액	계약액	계약자	납품일자	용역기간	비고
2016.4.6	춘포 학연~익산천 제방간 도로확포장 실시설계용역	실시설계 1식	9,073	8,256	㈜우향이앤씨	2016.7.3	2016.4.6. ~2016.7.3
2016.4.7	춘포 학연~익산천 제방간 도로확포장 소규모환경영향평가용역	소규모환경영향평가 1식	17,468	17,440	㈜주한건설기술단	2016.7.13	2016.4.7. ~2016.7.24
2015.3.16	왕궁천하천 정비사업 실시설계용역	하천정비 L=9.25㎞ 실시설계및소규모환경영향평가, 문화재지표조사	800,000	689,594	(주)이산 외 4개사	2017.12.30	‘15.6.24~ ‘17.12.30
2015.3.30	지방하천기본계획수립 (대조천)	하천기본계획 수립 및 전략환경영향 평가 L=4.3km)	180,000	180,000	(유)여울건설엔지니어링 외 1개사	2016.3.22	‘15.4.27~ ‘16.3.22
2016.3.17	금강생태하천(용안지구) 활성화를 위한 실시설계용역	금강생태하천 친수시설보강 및 시설개선 실시설계	100,000	74,427	㈜현성엔지니어링	2016.12.05	2016.03.17. ~ 2016.12.05

(단위 : 천원)

확인자	:	건설과장		김 중 만	□
작성자	:	건설행정계장		나 진 우	□
작성자	:	도로시설계장		배 진 호	□
작성자	:	하천시설계장		황 기 덕	□
작성자	:	하천관리계장		양 기 주	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

11. 인․허가민원

인․허가 민원내역이 없습니다.

확인자	:	건설과장		김 중 만	□
작성자	:	도로시설계장		배 진 호	□
작성자	:	하천시설계장		황 기 덕	□
작성자	:	하천관리계장		양 기 주	□

12. 각종 공사 설계 변경상황

(단위 : 천원)

연번	사업명	예산액	계약액 (변경액)	계약자	계약 일자	변경 일자	공 사 기 간	변경사유
1	성당 삼회선 도로확포장공사 ( 1차분 )	723,606	258,442 (378,316)	(유)우림종합조경	2015.11.4	2016.2.17	2015.11.11. ~ 2017.8.8	잔여 예산확보에 따른 일괄시행
2	함열 금성마을 진입로 개설공사	102,942	68,618 (69,141)	(유)성우토건	2015.9.23	2016.3.25	2015.9.24. ~ 2016.2.22	사유지 토지협의 불가로 대체사업 변경시행
3	여산 신리~호월간 도로확포장공사 (2차분)	512,189	136,024 (165,260)	(주)정신건설	2016.2.26	2016.5.11	2016.3.2. ~ 2016.8.20	이설버스 승강장 앞 포장, 곡선부 확폭
4	성당 삼회선 도로 확포장공사 (1차분 2회)	723,606	378,316 (420,354)	(유)우림종합조경	2015.11.4	2016.5.23	2015.11.11. ~ 2017.8.8	현장여건에따른 물량변경, 민원해소
5	함라 수동~금곡간 도로확포장공사 2공구 (2차분)	308,248	106,832 (115,454)	㈜동성건설	2016.2.26	2016.5.30	2016.3.2. ~ 2016.11.7	우수배제시설 추가설치
6	여산 신리~호월간 도로확포장공사 2차분 2회	512,189	165,260 (162,357)	㈜정신건설	2016.2.26	2016.6.10	2016.3.2. ~ 2016.8.20	사면보호공법 변경 및 시험비정산
7	함라 수동~금곡간 도로확포장공사 2공구 (2차분2회)	308,248	115,454 (113,023)	㈜동성건설	2016.2.26	2016.6.15	2015.6.29. ~ 2016.11.7.	시험비 정산
8	여산 부사관학교~상옥마을간 교행장소 설치공사	100,000	53,149 (56,100)	(유)덕산건설	2016.3.31	2016.6.16	2016.4.4. ~ 2016.7.21	토지사용 미승낙에 따른 교행장소 폭조정 및 보험료 정산
9	성당 삼회선 도로확포장공사 (1차분 3회)	723,606	420,354 (409,295)	(유)우림종합조경	2015.11.4	2016.7.26.	2015.11.11 ~ 2017.8.8	시험비 정산, 보험료등 제경비 실정산
10	오산 북영선 도로확포장공사 1차분	698,615	117,770 (349,064)	(유)상명종합건설	2016.2.26	2016.9.1	2016.3.7. ~ 2017.2.8	예산추가 확보에 따른 차수금액변경
11	오산 북영선 도로확포장공사 (1차분 2회)	698,615	349,064 (310,119)	(유)상명종합건설	2016.2.26	2016.12.5	2016.3.7. ~ 2017.2.8	일부구간 도로계획고 조정
12	오동정천 소하천 정비공사	800,000	611,200 (611,200)	(주)제일건설	2016.03.04	2016.6.23	2016.03.10. ~ 2016.11.09	공사여건 고려한 물량 변경조정
13	금강생태하천 (용안지구) 활성화사업 수련식재공사	532,000	59,645 (86,300)	㈜조경미술 연구소 대표 김경선	2016.05.26	2016.07.14	2016.05.30. ~ 2016.07.18	현장여건에따른 물량변경
14	금강생태하천(용안지구) 습지관찰원 보수보강공사	532,000	220,377 (233,310)	(유)보원건설 대표 이일섭	2016.10.21	2016.12.20	2016.10.27. ~ 2016.12.22	현장여건에따른 물량변경

13. 건설공사 집행 현황(3천만원 이상)

확인자	:	건설과장		김 중 만	□
작성자	:	도로시설계장		배 진 호	□
작성자	:	하천시설계장		황 기 덕	□
작성자	:	하천관리계장		양 기 주	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

(단위 : 천원)

연번	사 업 명	사업량	예산액	집행액	잔액	집행률 (%)	비고
	계	17건	7,738,843	5,955,008	1,783,835	77
1	함라 수동~금곡간 도로확포장	L=1.1㎞ B=8m	308,248	294,577	13,671	95.6
2	용동 삼정~두무간 도로확포장	L=1.21㎞ B=8m	288,593	130,383	158,210	45.1
3	여산 신리~호월간 도로확포장	L=1.4㎞ B=8m	512,189	449,977	62,212	87.9
4	여산 부사관학교~상옥마을간 교행장소 설치	교행장소 6개소	100,000	93,808	6,192	93.8
5	오산 북영선(금몽~남전)확포장	L=1.73㎞ B=8m	698,615	393,234	305,381	56.3
6	성당 삼회선(성당 우회도로)도로확포장공사	L=1.38㎞ B=8m	723,606	704,008	19,598	97.3
7	군도23호선 도로확포장	L=3.4㎞ B=20m	1,100,000	1,093,479	6,521	99.4
8	춘포 학연~익산천 제방간 도로확포장	L=0.74㎞ B=8m	150,000	91,909	58,091	61.3
9	함열 금성마을 진입로 개설공사	덧씌우기 L=680m	102,942	92,632	10,310	90.0
10	왕궁천하천환경정비사업	하천정비사업 L=9.2㎞	778,426	32,050	746,376	4.2
11	지방하천 기본계획수립	대조천 기본계획 수립 L=4.3㎞	17,140	17,140	0	100
12	소하천정비	신평,오동정,,외산 L=2.43㎞	1,627,220	1,485,065	142,155	91
13	하천제방유지보수(자체)	관내 소하천(102km) 및 지방하천(187km) 유지보수 1식	218,500	148,935	69,565	68.2
14	하천제방유지보수	관내 지방하천(187km) 유지보수 1식	62,000	55,101	6,899	88.9
15	국가하천유지관리	국가하천(금강, 강경천 24km) 유지관리 1식	532,000	427,778	104,222	80.4
16	국가하천유지관리 (4대강외)	국가하천(만경강18km) 유지관리 1식	115,000	40,688	74,312	35.4
17	보안등신규설치	익산시관내 - 365개소	404,364	404,244	120	99.9

확인자	:	건설과장		김 중 만	□
작성자	:	건설행정계장		나 진 우	□
작성자	:	도로시설계장		배 진 호	□
작성자	:	하천시설계장		황 기 덕	□
작성자	:	하천관리계장		양 기 주	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

14. 민간에 대한 보조금 집행내역

민간에 대한 보조금 집행내역 없습니다.

확인자	:	건설과장		김 중 만	□
작성자	:	하천시설계장		황 기 덕	□
작성자	:	하천관리계장		양 기 주	□

15. 국․도비 보조사업 집행현황(1억원이상)

연번	사 업 명	사업량	예산액	집행액	잔 액	집행률 (%)	비 고
	계	5건	3,145,786	2,063,223	1,082,563	65.5
1	왕궁천하천 환경정비사업	하천정비사업 L=9.2㎞	778,426	32,050	746,376	4.1
2	지방하천 기본계획수립	대조천 기본계획 수립 L=4.3㎞	17,140	17,140	0	100
3	소하천정비	신평,오동정,,외산 L=2.43㎞	1,627,220	1,485,065	142,155	91.2
4	국가하천 유지관리	국가하천(금강, 강경천 24km) 유지관리 1식	608,000	488,280	119,720	80.3	국비
5	국가하천 유지관리 (4대강외)	국가하천(만경강18km) 유지관리 1식	115,000	40,688	74,312	35.4	국비

16. 명시 및 사고이월사업비 집행내역

확인자	:	건설과장		김 중 만	□
작성자	:	도로시설계장		배 진 호	□
작성자	:	하천시설계장		황 기 덕	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

(단위 : 천원)

연번	사업명	사업량	예산액	집행액	잔액	집행률(%)	비고
	계		2,538,549	2,117,075	421,474	83.3
1	용동 삼정~두무간 도로확포장공사	L=1.21㎞ B=8m	88,593	88,593	0	100
2	여산 신리~ 호월간 도로 확포장공사	L=1.4㎞ B=8m	512,189	449,977	62,212	87.9
3	오산 북영선 도로확포장공사	L=1.73㎞ B=8m	98,615	74,323	24,292	75.4	사고 이월
4	성당 삼회선 도로확포장공사	L=1.38㎞ B=8m	164,285	163,998	287	99.8
5	함열 금성마을진입로 개설공사	덧씌우기 L=680m	102,942	92,632	10,310	90.0
6	소하천정비종합계획 재수립용역	62개소 L=102km	383,859	383,859	0	100
7	신평천 정비공사	L=1.07km	462,187	371,814	90,373	80%
8	오동정천저비공사	L=0.74km	355,441	355,441	0	100
9	외산천 정비공사	L=0.62km	66,843	66,843	0	100
10	대조천 지방하천 기본계획수립 용역	L=4.3km	17,140	17,140	0	100
11	물문화관건립에딸느도시관리계획외2	만경강물문화관건립1식	250,034	16,034	234,000	6.4	사고이월 66,001
12	하천제방유지보수	지방하천유지보수 1식	6,421	6,421	0	100
13	지방하천정비	국가및지방하천 지적공부정리	30,000	30,000	0	100

확인자	:	건설과장		김 중 만	□
작성자	:	도로시설계장		베 진 호	□
작성자	:	하천시설계장		황 기 덕	□
작성자	:	하천관리계장		양 기 주	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

17. 2016년 예산중 2017년 명시및사고이월내역

연번	사 업 명	사업량	예산액	이월액	이월사유	비고
	계		11,864,264	6,599,102
1	용동 삼정~두무간 도로확포장공사	L=1.21㎞ B=8m	700,000	658,210	준공시기 미도래
2	오산 북영선 도로확포장공사	L=1.73㎞ B=8m	600,000	281,089	준공시기 미도래
3	춘포 학연~익산천 제방간 도로확포장	L=0.74㎞ B=8m	148,460	58,091	준공시기 미도래
4	군도23호선 도로확포장	L=3.4㎞ B=20m	1,100,000	6,521	준공시기 미도래
5	평화육교 재가설	L=233ｍ B=35ｍ	5,600,000	5,100,000	준공시기 미도래
6	하천제방유지보수 (자체)	소하천 및 지방하천 유지보수 1식	218,500	47,310	실시설계 진행중 이월하여 집행
7	하천제방유지보수	지방하천 유지보수 1식	62,000	6,899	실시설계 진행중 이월하여 집행
8	국가하천유지관리	국가하천(금강,강경천) 유지관리 1식	532,000	104,222	실시설계 진행중 이월하여 집행
9	국가하천유지관리 (4대강외)	국가하천(만경강) 유지관리 1식	115,000	74,312	실시설계 진행중 이월하여 집행
10	소하천정비	오동정천 L=2.43㎞	797,220	78,908	준공시기 미도래
11	보안등신규설치	목천동이지푸드앞보안등설치공사	30,000	30,000	실시설계 진행 중 이월하여 집행
12	오산북영선 도로확포장공사	L=1.73㎞ B=8m	98,615	24,292	준공시기 미도래	사고
13	물문화관건립에 따른 도시관리계획외2	만경강물문화관건립1식	250,034	66,001	도시관리계획및실시설계진행중	사고
14	소하천정비사업(오동정천)	오동정천정비공사L=0.74㎞	1,612,435	63,247	준공시기 미도래	사고

(단위: 천원)

확인자	:	건설과장		김 중 만	□
작성자	:	건설행정계장		나 진 우	□
작성자	:	도로시설계장		배 진 호	□
작성자	:	하천시설계장		황 기 덕	□
작성자	:	하천관리계장		양 기 주	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

18. 예산전용 사항 및 예비비 집행현황

각종 예산전용 및 예비비집행 내역이 없습니다.

19. 공사 준공기한 연장내역

확인자	:	건설과장		김 중 만	□
작성자	:	건설행정계장		나 진 우	□
작성자	:	도로시설계장		배 진 호	□
작성자	:	하천시설계장		황 기 덕	□
작성자	:	하천관리계장		양 기 주	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

공사준공기한 연장 내역이 없습니다.

20. 국․도비예산중 사업 미시행으로

전액 반납한 현황

확인자	:	건설과장		김 중 만	□
작성자	:	건설행정계장		나 진 우	□
작성자	:	도로시설계장		배 진 호	□
작성자	:	하천시설계장		황 기 덕	□
작성자	:	하천관리계장		양 기 주	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

국․도비 예산 중 사업 미시행으로 전액 반납한 현황이 없습니다.

확인자	:	건설과장		김 중 만	□
작성자	:	도로시설계장		배 진 호	□
작성자	:	하천시설계장		황 기 덕	□
작성자	:	하천관리계장		양 기 주	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

21. 국․도비 반납현황

국·도비 반납현황 없습니다.

22. 2016년도 계획사업중 미착공사업 현황

확인자	:	건설과장		김 중 만	□
작성자	:	건설행정계장		나 진 우	□
작성자	:	도로시설계장		배 진 호	□
작성자	:	하천시설계장		황 기 덕	□
작성자	:	하천관리계장		양 기 주	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

(단위 : 백만원)

구분	위치	사 업 명	사 업 개 요 (km, m)	사업 기간	총 사 업 비(백만원)					사업 구분	공정	비고
					계	기투자	2015 이월	2016	금 후 투 자
					해	당	없	음

확인자	:	건설과장		김 중 만	□
작성자	:	건설행정계장		나 진 우	□
작성자	:	도로시설계장		배 진 호	□
작성자	:	하천시설계장		황 기 덕	□
작성자	:	하천관리계장		양 기 주	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

23. 2016년도 계획사업중 유보 및 취소된 사업현황

2016년 계획사업중 유보 및 취소된 사업이 없습니다.

확인자	:	건설과장		김 중 만	□
작성자	:	건설행정계장		나 진 우	□
작성자	:	도로시설계장		배 진 호	□
작성자	:	하천시설계장		황 기 덕	□
작성자	:	하천관리계장		양 기 주	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

24. 2016년도 이월사업중 유보 및 취소된 사업

2016년도 이월사업중 유보 및 취소된사업 없습니다

확인자	:	건설과장		김 중 만	□
작성자	:	건설행정계장		나 진 우	□
작성자	:	도로시설계장		배 진 호	□
작성자	:	하천시설계장		황 기 덕	□
작성자	:	하천관리계장		양 기 주	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

25. 2016년도 예산편성 후 전액 미집행내역

(단위 : 백만원)

구분	위치	사 업 명	사 업 개 요 (km, m)	사업 기간	총 사 업 비(백만원)					사업 구분	공정	비고
					계	기투자	2015 이월	2016	금 후 투 자
					해	당	없	음

확인자	:	건설과장		김 중 만	□
작성자	:	건설행정계장		나 진 우	□

26. 소 송 사 건  현 황

사건번호	사건명	원 고	피 고	접수일	변호사 선임사항	추진사항 (판,종결일)
전주지방법원 2015구함1493	토지수용 보상금증액	이성진외1	익산시	2015.07.22	우관수 변호사	항소심진행중
전주지방법원 2015구합773호	영업보상	정진형외1	익산시	2015.03.24	김종성변호사	2016.06.04종결
전주지방법원 2015나5449	부당이득금 반환	최태영외1	익산시	2015.07.03	김종성변호사	2016.07.31종결
전주지방법원 군산지원 2016가단6960	보상금	김인식	익산시	2016.08.29	무	2016.12.30종결
전주지방법원 2016구합2363	보상금	김인환	익산시	2016.07.09	우관수변호사	진행중
전주지방법원 2016구합947	토지수용재결 처분취소등	연정태	익산시	2016.05.10	무	진행중
전주지방법원 2016구합824	토지수용재결 처분취소등	연정태	익산시	2016.05.10	무	진행중
수원지방법원 2016가단801142	부당이득금	이문순외2	익산시	2016.12.01	우관수 변호사	진행중

27. 시홈페이지에서 접수된 민원처리 현황

확인자	:	건설과장		김 중 만	□
작성자	:	건설행정계장		나 진 우	□
작성자	:	도로시설계장		배 진 호	□
작성자	:	하천시설계장		황 기 덕	□
작성자	:	하천관리계장		양 기 주	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

□ 민원접수 현황

부서명	시 정 에 바 란 다		비고
	접수(건)	처리(건)
건설과	41	41

□ 주요처리현황

◦ 도로개설 및 확포장 관련 민원  :   6건

◦ 가로등, 보안등관련 민원        :  28건

◦ 기타 민원 (하천, 보상)         :   7건

□ 주요처리내용

◦ 부송동 하나리움 정문앞 인도에 가로등 불이 들어오지 않아 밤에 아파트 앞을 지날 때

무섭고 깜깜해서 걱정 가로등 보수 요구

⇒  하나리움 아파트 정문앞 인도변 가로등 고장신고에 대하여 현장확인 후 조치 완료.

◦ 성당포구 마을 바람개비 길에 차를 끌고 자전거도로까지 진입하는데 사고가 나지 않을까           걱정 적절한 조치가 필요함.

⇒ 현재 바람개비 길은 자전거와 차량이 함께 통행되는 구간으로서 차량진입을 막기는 어려          우며 자전거 길을 이용하는 이용객들의 안전을 위하여 차량 속도제한표시 및 조형물을 설          치토록 노력하겠음으로 답변하였으며, 현재 속도제한표시 및 조형물 설치 완료.

감사자료 과 요구사항

1. 공익사업을 위한 용지보상

확인자	:	건 설 과 장		김 중 만	□
작성자	:	건 설 행 정 계 장		나 진 우	□

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 장 : 47개 사업장

(건설과 19, 도시개발과 25, 도로공원과 1, 시민안전과 1, 타기관 1 )

◦ 보상대상 : 2,808필지, 597,285㎡

◦ 보상금액 : 75,210백만원

□ 추 진 실 적

◦ 토지매입실적 (69%) :    47개소 / 1,904필지  /  413,052㎡

◦ 보상계획 열람공고  :       7개소 /   659필지  /  138,509㎡

◦ 감정평가 실시  :    14개소 /   671필지  /  135,394㎡

◦ 토지수용재결신청   :      6개소 /    91필지  /   19,805㎡

◦ 토지수용재결 공탁 완료

▸ 함라수동-금곡간 도로확포장 공사

▸ 성당 삼회선 도로확포장공사

□ 기 대 효 과

◦ 시민에게 다가서는 보상행정으로 양질의 서비스 제공

◦ 공익사업을 위한 적극 협의보상 도로망 확충으로 도시발전 기여

확인자	:	건 설 과 장		김 중 만	□
작성자	:	도로시설계장		배 진 호	□

2. 2016년도 시･군도 농촌도로 확포장 사업

□ 2016 이월사업 및․ 계속사업  -  23개사업

(단위:m, 백만원)

연번	사 업 명	사업개요	예 산 액				추진실적	노선명	비고
			총 사업비	기투자	2016년 예산액	금후 투자
	23개사업	L=32.96km B=8~20m	51.934	9.768	3.055	39.144
1	함라 수동~금곡간 도로확.포장	L=1.11km B=8.0m	1,339	1,084	255	0	준공	함라 207 (수곡선)
2	오산 북영선 도로확.포장	L=1.73km B=8.0m	2,526	1,426	600	500	공정율 30%	오산 204 (북영선)
3	여산 신리~호월간 도로확.포장	L=1.4km B=8.0m	1,162	1,162	0	0	준공	여산 203 (신호선)
4	삼성동 하나로~ 외화간도로확.포장	L=1.55km B=8.0m	3,180	730		2,450	용지 63%	시도1201 (외화선)
5	오산 신수선 도로확.포장	L=1.5km B=7.0m	1,079	879		200	용지 93%	오산 203 (신수선)
6	오산 장신~만석간 도로확.포장	L=1.6km B=8.0m	1,786	274		1,512	용지 87%	오산 301 (용연선)	군도 1호
7	용동 삼정~두무간 도로확.포장	L=1.21km B=8.0m	1,847	176	700	971	공정율 10%	용동 204 (삼두선)
8	함라 진등 진입로 개설	L=1.43km B=6.5m	1,063	145		918	용지 85%	함라 301 (행진선)
9	함라 칠성~다은간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m	975	190		785	용지 85%	함라 201 (진다선)
10	오산 모산선(신모선) 도로확.포장	L=1.7km B=6.5m	2,096	212		1,884	용지 85%	오산 306 (신모선)	일부 폐지
11	망성 군도10호~ 금지간 도로확.포장	L=1.2km B=8.0m	1,872	180		1,692	용지 66%	군도 10호
12	왕궁 군도26호선 도로확.포장	L=1.7km B=8.0m	2,970	577		2,393	용지 75%	군도 26호
13	망성 신성~관산간 도로확.포장	L=0.91km B=7.0m	1,365	306		1,059	용지 68%	망성 303 (신선선)
14	금마 갈산~서편간 도로확.포장	L=1.6km B=8.0m	2,829	229		2,600	용지 45%	금마 101 (서삼선)
15	왕궁 가좌마을 진입로확.포장	L=0.7km B=8.0m	1,116	103		1,013	용지 63%	왕궁 303 (사곡선)

연번	사 업 명	사업개요	예 산 액				추진실적	노선명	비고
			총 사업비	기투자	2016년 예산액	금후 투자
16	금마 누동~신촌간 도로확.포장	L=0.93km B=8.0m	1,411	405		1,006	용지 56%	금마 102 (누부선)
17	왕궁 평화촌~평리간 도로확.포장	L=1.3km B=8.0m	3,445	180		3,265	용지 52%	왕궁 302 (신평선)
18	왕궁 온수~시대간 (황암~상발)확.포장	L=3.0km B=8.0m	2,803	296		2,507	용지 57%	군도 21호
19	춘포 토다리~덕동간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m	2,220	127		2,093	용지 9%	춘포 103 (신화선)
20	성당 삼회선(성당우회도로) 도로 확포장공사	L=1.38km B=8.0m	968	718	250	0	준공	성당 302 (삼회선)
21	용안 창리~법성간 도로확.포장	L=0.84km B=8.0m	846	30		816	설계완료	용안 203 (자석선)
22	춘포 학연~익산천간 도로확.포장	L=0.77km B=8.0m	596	19	150	400	설계완료	춘포 201 (천서선)
23	군도23호 도로확포장공사	L=3.4km B=20.0m	12,500	320	1,100	11,080	보상중 28%	군도 23호

□ 2016년도 신규 사업

사 업 명	개 요	사 업 기 간	사 업 비 (백만원)				공 정	비 고
			총 사업비	기투자	2016 예산	금후
합 계	2개사업 L=4.14㎞		13,069	339	1,250	11,480
춘포 학연~익산천 제방간 도로확포장	L=0.74㎞ B=8m	2006 ~ 2017	569	19	150	400
군도 23호 도로 확포장공사	L=3.4㎞ B=20m	2013 ~ 2019	12,500	320	1,100	11,080

□ 2016년 준공된 사업

사 업 명	개 요	사 업 기 간	사 업 비 (백만원)				공 정	비 고
			총 사업비	기투자	2016 예산	금후
합 계	3개사업 L=3.88㎞		3,469	2,964	505
함라 수동~금곡간 도로확포장	L=1.1㎞ B=8m	2003 ~ 2016. 6	1,339	1,084	255	-	100%	이월 예산 제외
여산 신리~호월간 도로확포장	L=1.4㎞ B=8m	2004 ~ 2016. 6	1,162	1,162	-	-	100%	이월 예산 제외
성당 삼회선 도로확포장	L=1.38㎞ B=8m	2004 ~ 2016. 7	968	718	250	-	100%	이월 예산 제외

3.

확인자	:	건 설 과 장		김 중 만	□
작성자	:	도로시설계장		배 진 호	□

평화육교 재가설 사업

□ 필   요   성

◦ 안전등급 D등급인 평화육교 재가설로 대중교통 안전성 확보 및 호남고속  철도(KTX) 완전한 정상화 실현

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 평화동 255번지 일원

◦ 사업기간 : 2015 ~2019년도

◦ 사 업 량 : 교량 재가설 L=233m(4차로⇒6차로)

◦ 총사업비 : 497억원(국비 307, 시비 190)

◦ 사업시행 : 한국철도시설공단

□ 추 진 실 적

◦ 평화육교 재가설 사업 건의	: 2011 ~ 2014.

▸ 국토교통부, 한국철도시설공단, 기획재정부 등

◦ 국비 지원 확정(기재부 총사업비 승인)	: 2015. 4. 6.

▸ 호남고속철도 사업비중 평화육교 재가설 사업 307억원 사용 승인

◦ 기본 및 실시설계 용역 추진(한국철도시설공단)	: 2015. 11 ~ 2017. 4

◦ 평화육교 재가설공사 입찰공고	: 2017. 4월중순

□ 금 후 계 획

◦ 재가설공사 착공	: 2017. 6월 말

◦ 행정절차 및 토지매입 추진	: 2017.  5 ~ 12.

◦ 재가설공사 추진	: 2017.  6 ~ 2019. 12.

▸호남선 KTX 노반공사와 병행시행

확인자	:	건 설 과 장		김 중 만	□
작성자	:	도로시설계장		배 진 호	□

4. 군도 23호선 확·포장사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 함열 용왕교차로~ 삼기 일반산업단지

◦ 사업기간 : 2016 ~2019년도

◦ 사 업 량 : 도로확포장 L=3.4km, B=20m (2차로⇒4차로)

◦ 총사업비 : 110억원(공사비 90, 보상비 20)

□ 추 진 실 적

◦ 지방재정 투융자 심사	:  2013.  6.  4.

◦ 도시계획 시설결정 및 실시설계 용역	:  2013. 7 ~ 2015. 1

◦ 도로구역 결정(변경) 및 지형도면 고시	:  2015. 6. 15

◦ 사업인가 고시(익산시  고시 제 2016- 4호)	:  2016.  1.  8

◦ 편입토지 분할측량 및 보상계획 열람공고	:  2016. 3. 24

◦ 감정평가 및 손실보상	: 2016. 6 ~ 현재

※ 총 248필지 51,900㎡ 중 81필지 19,921㎡(38.4%)

□ 금 후 계 획

◦ 편입토지 및 지장물 협의매수(예산범위 내)	: 2017. 4 ~ 12

◦ 토지매입 부족분(9억원) 확보 및 보상실시	: 2016. 6 ~ 12

◦ 공사 추진	: 2018. 3 ~ 2019. 12월

5. 왕궁천하천환경정비사업

확인자	:	건 설 과 장		김 중 만	□
작성자	:	하 천 시 설 계 장		황 기 덕	□

□ 사 업 개 요

사업명	위 치	사업기간	사 업 비(백만원)	사업 내용
왕궁천 하천환경 정비사업	왕궁면 동용리~ 춘포면 익산천 합류점	2015. ~ 2019.	24,720(국12,360 도4,944 시7,416) ▸2016년 : 600	하천정비 L=9.25km (제방축조 및 보축, 교량가설등) ▸현 공정 : 90% (실시설계 용역중)

□ 추 진 실 적

◦ 왕궁천 하천정비사업 실시설계용역 발주	2015. 03.

◦ 실시설계용역 착수	2015. 06.

◦ 익산지방국토관리청, 전북도 1차 협의	2015. 10 ~ ‘16. 04.

◦ 주민설명회(1차)	2016. 06.

◦ 설계 경제성 검토(VE)	2016. 12.

◦ 익산지방국토관리청, 전북도 2차 협의	’16. 12 ~ ‘17. 04.

□ 금 후 계 획

◦ 도 기술심의 및 총사업비 협의(국토부, 기재부)	‘17. 05. ~ 06.

◦ 공사 발주 및 착공	‘17. 07. ~ 08.

◦ 공사 추진	‘17. 09. ~ ’19. 12.

6. 소 하 천 정 비 사 업(오동정천,외산천)

확인자	:	건 설 과 장		김 중 만	□
작성자	:	하천시설계장		황 기 덕	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 망성 어량리(오동정천), 금마 산북리(외산천)

◦ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2017. 12

◦ 사 업 비 : 5,400백만원 (국비 2,700,  시비 2,700)

▸ 2016년 사업비 : 1,550백만원 (국비 775,  시비 775)

◦ 사업내용 : 소하천정비 2개 하천 L=1.36km 및 토지보상

사 업 명	사 업 량	사업비(백만원)	사업기간
오동정천	소하천정비 L=0.74km	3,600	2015. 1 ~ 2017. 08
외 산 천	소하천정비 L=0.62km	1,800	2015. 1 ~ 2016. 12

□ 추 진 실 적

◦ 외산천 소하천정비공사 추진	‘15. 06. ~ ’16. 12

▸ 1, 2차분 준공 (전체분 100%)

◦ 오동정천 소하천정비공사 총액발주	2015. 11.

◦ 오동정천 소하천정비공사 1. 2차분 추진	2016. 03. ~ 11.

◦ 오동정천 소하천정비공사 3차분 착공	2017. 02

□ 금 후 계 획

◦ 오동정천 소하천정비공사 3차분 추진	‘17. 03. ~ . 08.

◦ 전체분 준공	2015. 1. ~ 2016. 12

7. 금강생태하천 기본계획 및 실시설계

확인자	:	건 설 과 장		김 중 만	□
작성자	:	하천관리계장		양 기 주	□

□ 용 역 개 요

◦ 위    치 : 용안 금강 생태하천 일원

◦ 사 업 비 : 100백만원(시비)

◦ 용역기간 : 2016. 1. ~ 2016. 12.

◦ 규    모 : 670,000㎡(약 20만평)

◦ 주요내용

▸금강생태하천 내 시설물 배치 기본계획(변경) 및 보강공사 실시설계

□ 추 진 실 적

◦ 금강 생태하천(용안지구) 활성화를 위한 실시설계용역 완료

▸ 용역내용 : 금강 생태하천 친수시설 보강, 보식 및 개선용역 1식

▸ 용 역 비 : 74,427천원

▸ 용역기간 : 2016. 3. 21 ~ 12. 5

▸ 용 역 사 :  ㈜현성엔지니어링

□ 기 대 효 과

◦ 금강 생태하천에 식재된 수목 성장이 멈추고 일부 고사 및 초화류 번식이    어려운바, 수질․토양분석을 통한 적정수종 선택 및 기본계획(변경) 및 실시설계 계획으로 생태하천 친수공간 기능 유지 및 이용객들에게 휴식공간 제공

8. 국가하천 유지관리사업

확인자	:	건 설 과 장		김 중 만	□
작성자	:	하천관리계장		양 기 주	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 국가하천 (금강, 만경강, 강경천) : 34.2㎞

▸ 금강 21.26km, 만경강 10.4km, 강경천 2.54km

◦ 사업기간 : 2016. 01 ~ 12.

◦ 사 업 비 : 758백만원(국비 100%)

◦ 사업내용

▸ 국가하천(금강, 만경강, 강경천) 유지관리

□ 추 진 실 적

◦ 금강 생태하천 활성화사업 수련식재공사

▸ 수련 및 연 식재 : 13,910주

◦ 금강 생태하천 습지관찰원 보수보강공사

▸ 지장물제거(토공) 35,230㎥

▸ 수생식물 이식 16,000주

◦ 금강 생태하천 환경정비공사

▸ 인부사역 : 용안, 성당면 인근지역 주민

▸ 사역내용 : 생태하천 환경정비사업(풀깍기, 예초, 꽃길 조성지 관리 등)

▸ 사역기간 : 2016년 6월 ~ 11월 (3회)

▸ 인    원 : 20명(회당)

9. 지방하천 정비

확인자	:	건 설 과 장		김 중 만	□
작성자	:	하천관리계장		양 기 주	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 관내 국가 및 지방하천 일원

◦ 사 업 비 : 100백만원(시비)

◦ 사업기간 : 2016. 1 ~ 2016. 12.

◦ 규    모

▸ 지적현황 작성 : 목천동 1187-24 외 425필지

▸ 도면작성 : 목천동 1187-24 외 68필지

◦ 주요내용 : 하천점용허가 지번 지적공부 정리 및 도면작성

◦ 지적공부 정리 대행기관 : 한국국토정보공사

□ 추 진 실 적

◦ 국가 및 지방하천 점·사용허가 관련 지적공부정리 현황측량 완료

▸ 용역내용 : 현황측량 268필지(익산천, 목천포천, 탑천)

무인항공기 영상촬영 및 하천관리시스템 구축

▸ 용역기간 : 2016. 1. 18 ~ 2016. 12. 5

▸ 용 역 비 : 95,155천원

▸ 용 역 사 : 한국국토정보공사 익산지사

□ 기 대 효 과

◦ 하천점용허가 지번과 지적공부상 지번이 별도지번으로 어려움이 있어 지적공부 작성 용역을 실시하여 하천점용에 대한 원활한 민원처리 및 하천관리 업무  효율성 증대

10. 도로조명시설 조도개선

확인자	:	건 설 과 장		김 중 만	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  : 익산시 일원

◦ 사 업 량  :  10개사업

◦ 사 업 비  :  622백만원(시비:525천원 , 도비:97천원)

◦  사업기간  :  2016. 01. ~ 2016. 12.

◦ 도로조명 시설 조도개선 공사 내역

구 분	세부사업	사 업 개 요	예산 (천원)	비 고
합 계		10개 사업	621,944
보안등 신규설치	생활환경 개선사업	보안등설치 177개소	191,304
	주민숙원사업	보안등설치 145개소	160,060
	특별조정교부금(도비)	보안등설치 64개소	73,000
	주민편익증진사업(도비)	보안등설치 및 교체	24,000
노후가로등 정비	도심지역 가로등 유지보수	노후선로정비 50개소	50,000
	산업단지 가로등 유지보수	노후가로등 선로정비	30,000
	가로등노후점멸기 교체공사	노후점멸기 교체5개소	22,500
	읍면지역 보안등 보수	고장보안등보수및정비	34,080
	노후 보안등기구 교체	노후등기구교체	30,000
	모현동주민센터앞가로등교체공사	가로등교체6개소	7,000

□ 추 진 실 적(619,814 / 99.6%)

◦ 보안등 신규설치(365개소)	427,057천원

◦ 모현동가로등LED교체공사(31개소)	19,832천원

◦ 도심지역 가로등 유지보수	49,345천원

◦ 산업단지 가로등 유지보수	30,000천원

◦ 가로등노후가로등점멸기교체(5개소)	22,500천원

◦ 읍면지역 보안등 보수	34,080천원

◦ 노후 보안등기구 교체	30,000천원

◦ 모현동주민센터앞가로등교체공사 (6개소)	7,000천원

11. 도로조명 고장민원 처리 내역

확인자	:	건 설 과 장		김 중 만	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

□ 필   요   성

◦ 도로조명 고장민원 접수에서 처리까지의 기간을 단축하여 여성 및

노약자의 야간통행 편익제공으로 보행자 통행불편을 최소화 하고자 함.

□ 사 업 개 요

◦ 2016년도 생활민원 처리 현황

(2016년 12월말 현재)

구 분	설치수량	처리건수	평균처리일수	비고
합 계	28,029등	4,402
가로등	9,378등	1,104	3일
보안등	18,651등	3,298	6일

□ 쟁점 및 애로사항

◦ 고장민원이 읍․면․동에 산재해 있고 민원처리반이 가로등, 보안등

각 1개조로 이동에 따른 시간소요로 고장민원 처리가 지연되어 재차

민원 발생함.

□ 추 진 실 적

◦ 도로조명 생활민원처리 지역별 이원화 시행  : 2016. 01.~12.

▸함열읍외 10개면	: 단가계약에 따른 민원처리

▸ 18개 면․동	: 가로등관리 자체인원으로 처리

◦ 도로조명 생활민원 처리(년중)                     : 2016. 01 ~ 12.

12. 가로등시설 실명제 추진

확인자	:	건 설 과 장		김 중 만	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

□  필  요  성(추진배경)

◦ 가로등시설물의 체계적인 관리 필요 및 고장신고 민원인 편익제공

▸고장신고시 해당위치 설명이 정확히 전달되지 않고 가로등이 곳곳에

산재해 있어 효율적인 시설관리와 상세현황 파악관리에 어려움

□ 사 업 개 요

◦ 사업대상 : 가로등 분전함(351개소), 가로등(9,044개소)

◦ 사업내용 : 가로등주에 고유관리번호 부여

◦ 사업계획

▸가로등시설물 전수조사실시 및 자료 확보

- 자체인력(가로등계장 외 6명)활용으로 사업비 최소화

◦ 조사기간 : 2014. 1. ~ 2014. 12.

□ 추 진 실 적

◦ 가로등시설물 전수조사(자료 수집 및 확보) : 2014년 1월~12월

▸가로등시설물 전수조사실시 및 자료 확보

▸각 분전함 및 가로등주에 고유관리번호 부여

◦ 가로등시설물 관리번호표찰부착 : 2017년 예산확보 후 사업추진

13. 2016 읍면동별 가로등 보안등 신규설치현황

확인자	:	건 설 과 장		김 중 만	□
작성자	:	가로등관리계장		안 순 회	□

□ 보안등 설치현황

연번	읍면동	설치수량	연번	읍면동	설치수량	비 고
1	함열읍	3	15	삼기면	8
2	오산면	23	16	중앙동	6
3	황등면	9	17	평화동	19
4	함라면	6	18	인화동	9
5	웅포면	9	19	동산동	13
6	성당면	6	20	마 동	1
7	용안면	8	21	남중동	9
8	용동면	49	22	모현동	19
9	낭산면	19	23	송학동	5
10	망성면	20	24	신 동	31
11	여산면	20	25	영등동	7
12	금마면	15	26	어양동	1
13	왕궁면	12	28	팔봉동	10
14	춘포면	24	29	삼성동	4
	소 계	223		소 계	142
	총 계	365

□ 가로등 설치현황

연번	사 업 내 용	등수	사업기관(부서)
1	부천초교옆 도로개설공사	4	도시개발과
계		4