경영개발과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2017 예산집행실적
□	2017 상반기 성과 및 반성
□	2017 주요업무 추진상황

비전 및 중점추진방향

	비 전
기업이 필요로 하는 최고 ･ 최적의 산업용지 제공

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	기업유치 촉진을 위한 정주 기반시설 조성 농촌지역 균형발전을 위한 전문 농공단지 조성 공영개발 특별회계의 효율적 운영으로 재정의 건실화 추진

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	익산 일반산업단지 진입도로 개설공사 함열농공(LED집적화)단지 조성사업 익산 부송4지구 도시개발사업

일   반   현   황

□ 기        구

					경영개발과
경영행정						용지보상								경영개발

□ 정  ․  현   원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	13		1	5	4	3
현 원	12		1	5	4		2
증 감	△1		-	-	-	△3	2

□ 사  무  분  장

◦ 경영 행정 : 공영개발사업 기획 및 조정, 공기업특별회계 예산편성

결산, 예산집행, 공사계약 및 자금운용 관리

◦ 용지 보상 : 용지분양 계획수립 및 추진, 경영평가 분석, 용지매입 및 보상,

지적공부정리, 토지수용  및  공탁, 공유재산 관리

◦ 경영 개발 : 익산일반산업단지 진입도로 개설사업, 함열농공(LED집적화)   단지 조성사업, 익산 부송4지구 도시개발사업

2017 예산집행실적

【 2017. 6. 15. 현재 】                                       (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
경영개발과				38,950,150	7,347,337	31,602,813	19.4
	영업비용			1,184,168	478,460	705,708	40.4
		일반관리비		1,184,168	478,460	705,708	40.4
			인건비	812,503	298,871	513,632	36.8
			직무수행경비	39,360	15,655	23,705	39.8
			일반운영비	80,184	32,282	47,902	40.3
			여비	35,040	13,531	21,509	38.6
			업무추진비	8,540	3,699	4,841	43.3
			복리후생비	10,920	5,124	5,796	46.9
			포상금	43,381	34,257	9,124	79.0
			연금부담금 등	154,240	75,041	79,199	48.7
	재고자산취득			19,635,019	1,708,877	17,926,142	8.7
		용지조성사업비		16,657,300	310,571	16,346,729	1.9
			시설비및부대비	16,657,300	310,571	16,346,729	1.9	건설개량 : 96,709 계속비: 974,291
		재고자산건설자금이자		2,977,719	1,398,306	1,579,413	47.0
			차입금이자상환	2,977,719	1,398,306	1,579,413	47.0
	비유동부채상환			18,020,000	5,160,000	12,860,000	28.6
		금융기관차입금 원금상환		18,020,000	5,160,000	12,860,000	28.6
			차입금원금상환	18,020,000	5,160,000	12,860,000	28.6
	예비비			110,963	0	110,963	0
		예비비		110,963	0	110,963	0
			예비비	110,963	0	110,963	0

2017 상반기 성과 및 반성

□  성    과

◦ 함열농공(LED집적화)단지 조성사업 추진

▸ 함열농공(전문)단지 지정(변경) 및 실시계획(변경) 승인

∙ 개발기간 변경 (당초) 2013 ~ 2016 → (변경) 2013 ~ 2017. 12.

▸ IGT LIGHTING 투자 협약(MOU)                   : 2017.  3.

∙ 면적 : 66,000㎡,  투자액 : 400억원

▸ 공사추진(토공 및 연약지반 처리)                  : 공정율 55%

◦ 익산일반산업단지 분양계약 체결

▸ 산업단지 분양계약              : 8필지(23,554㎡) 3,284백만원

∙ 산업용지 분양                : 6개업체(19,239㎡) 2,225백만원

- 제3산업단지 : ㈜비앤디네트웍스, 전일니트

- 제4산업단지 : ㈜유쎌, ㈜하림식품, ㈜HS푸드, ㈜연두

∙ 지원용지(상업, 변전소) 분양    : 2필지(4,315㎡) 1,059백만원

◦ 익산부송4지구 도시개발사업 추진

▸ 전략환경영향평가 본안 협의 완료

∙ 전략환경영향평가 본안 협의 설명차 방문(KEI)

∙ 사업대상지 현지방문(새만금 지방환경청장)

□  반    성

◦ 익산 제3, 4산업단지 및 함열농공단지 분양계약 체결 저조

‣ MOU체결 기업 등 독려로 조속한 분양 계약 체결

2017주요업무추진상황

	□	익산일반산업단지 진입도로 개설공사 함열농공(LED집적화)단지 조성사업 함열농공단지 진입로 확장공사 익산 부송4지구 도시개발사업 익산일반산업단지 지원시설 용지분양

1		익산일반산업단지 진입도로 개설공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산제3일반산업단지 (낭산면) ~ 연무 IC (논산시 연무읍)

◦ 사업내용 : 도로신설 L = 11.86㎞ (4차로), 교량신설 19개소 (1,245m)

◦ 사업기간 : 2010. 2 ~ 2017. 12

◦ 총사업비 : 1,629억원 (공사비 1,209억, 보상비 등 420억)

◦ 현재까지 확보액 : 1,103억(국비 809억, 도비 27억, 시비267억)

▸ 2017년 예산액 : 150억(시비, 본예산 50억, 1회 추경 100억)

◦ 현공정율 : 59%

□ 상반기 추진실적

◦ 총사업비 조정결과 통보(1,629억)	2017.  1.

▸ 조정내역(문화재 시굴, 사후환경, 환경영향평가, 물가변동 등)

◦ 토지수용위원회 재결신청(66필지, 40,299㎡)	2017.  4.~ 6.

▸ 1차(29필지, 10,233㎡), 2차(37필지, 30,066㎡)

□ 하반기 추진계획

◦ 공사(6차분) 착공	2017.  7.

◦ 사업기간 조정 협의(국토교통부)	2017.  8.

◦ 토지보상 100% 완료(잔여토지보상 2,700㎡)	2017. 12.

2		함열농공(LED집적화)단지 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 함열읍·용안면 일원

◦ 사업내용 : LED전문단지 조성 (329천㎡)

◦ 사업기간 : 2013 ~ 2017

◦ 총사업비 : 350억원 (국비30억, 도비5억, 시비(출자금) 2억, 민간313억)

◦ 현공정율 : 55%

◦ 시 행 자 : 익산엘이디협동화단지개발(주)

□ 상반기 추진실적

◦ 함열농공(전문)단지 지정(변경) 및 실시계획(변경) 승인	2017. 3.

▸개발기간 변경 (당초) 2013 ~ 2016 → (변경) 2013 ~ 2017. 12.

◦ IGT LIGHTING 투자 협약(MOU)	2017. 3.

▸ 면적 : 66,000㎡,  투자액 : 400억원

◦ 공사 추진(토공, 연약지반처리 및 우수공, 55%)	2017. 6.

□ 하반기 추진계획

◦ 공사 추진(기반시설 설치 등)	2017.  7. ~

◦ 공사준공	2017. 12.

3		함열농공단지 진입로 확장공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 국도 23호선 ~ 익산 함열 농공단지 지구계

▸도시계획도로 중로1-2호선(294m), 중로3-3호선(84m)

◦ 사업내용 : 도로확장공사 L=378m B=16~20.5m

◦ 사업기간 : 2017. 1 ~ 2017. 12

◦ 사 업 비 : 15억원(공사비 13억,  보상비 2억)

□ 상반기 추진실적

◦ 도시계획시설사업 실시계획인가 고시	2017. 3.

◦ 설계심의 및 계약심사 완료	2017. 3.

◦ 편입토지 및 지장물 보상 중	2017. 5. ~

◦ 공사 착공	2017. 5.

□ 하반기 추진계획

◦ 공사 준공	2017. 11.

4		익산 부송4지구 도시개발사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 부송동 일원 (신재생자원센터 주변)

◦ 사업내용 : 주거용지, 상업용지, 학교용지 등 (331천㎡)

◦ 사업기간 : 2011. 2 ~ 2020. 6.

◦ 총사업비 : 387억원 (조성비 208억, 보상비 90억, 기타 89억)

◦ 시행방법 : 도시개발법에 의한 환지방식

□ 상반기 추진실적

◦ 전략환경영향평가 본안 협의 설명차 방문(KEI)	2017.  3.

◦ 전략환경영향평가 본안 협의 수정보완서 제출(새만금지방환경청)	2017.  3.

◦ 전략환경영향평가 본안 협의 완료	2017.  4.

◦ 道 도시계획위원회 심의자료 작성 및 협의(시→도)	2017.  5. ~ 6.

□ 하반기 추진계획

◦ 道 도시계획위원회 개최 및 심의	2017.  6.

◦ 도시개발구역지정 및 개발계획수립 고시	2017.  7.

◦ 도시개발사업 실시계획인가 신청	2018.  1.

5		익산일반산업단지 지원시설 용지분양

□ 지원시설용지 현황

(단위 : ㎡, 백만원)

구 분	분 양 계 획		분 양		미 분 양		분양률 (%)
	면적(필지)	금액	면적(필지)	금액	면적(필지)	금액
계	116,374(120)	37,337	47,100 (90)	12,245	69,274 (30)	25,092	40.5
단독주택	27,499 (77)	3,569	27,499 (77)	3,569	0	0	100.0
공동주택	26,969 (3)	6,722	0	0	26,969 (3)	6,722	0.0
상업용지	54,598 (37)	25,715	14,938 (11)	8,014	39,660(26)	17,701	27.4
기타용지	7,308 (3)	1,331	4,663 (2)	662	2,645 (1)	669	63.8

□ 상반기 추진실적

◦ 지원시설용지 분양홍보	2017. 1. ~ 6.

▸ KCN자막홍보

▸ 중개업 협회 등 분양 분위기 확산 안내문 배포 (311개소)

◦ 투자 적정규모로 분양면적 및 공동주택 용적율 변경 승인	2017. 3.

▸분양면적(400평⇒200평) 조정 : 22필지

▸공동주택 용적율 상향(200%⇒250%) 및 최고층수 규제완화(4층⇒10층)

□ 하반기 추진계획

◦ 지원시설용지 분양홍보	2017. 12.

▸ 익산사랑방 소식지, 내고장소식지 게재, KCN자막홍보

◦ 지원시설 용지내 도로개설공사 시행	2017. 12.