2017. 7.

제203회 익산시의회(임시회)

― 2017 주요 업무 보고 ―

상반기 결산 및 하반기 추진계획

	전국체전담당관

전국체전담당관진○○○○과

□	비전 및 중점추진방향	………	3
□	일 반 현 황	………	4
□	2017 예산집행실적	………	5
□	2017 상반기 성과 및 반성	………	6
□	2017 주요업무 추진상황	………	7

비전 및 중점추진방향

성숙한 시민의식

완벽한 대회준비

대회분위기 조성

체전과 문화․예술이 어우러지는 문화체전 승화

• 성숙된 시민의식

• 깨끗한 환경조성

• 안전한 선진교통

• 경기시설 완벽준비

• 체계적인 운영지원

• 기반편의시설 확충

• 자발적 시민참여

• 문화행사와 연계

• 적극적 체전 홍보

• 시민이 모두 함께 준비하고 참여하는	『화합체전』

• 백제문화유산과 스포츠가 어우러지는             『문화체전』

• 기존시설 활용으로 지역발전 견인하는           『경제체전』

• 교통문화 정착으로 선진 교통도시 지향하는	『교통체전』

• 선수·관람객 및 시민 안전과 편의를 지키는	『안전체전』

-

일  반  현  황

□ 기       구

						전국체전 담당관
체 전 운 영											체 전 시 설

□ 정 ․ 현 원

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	9	1	2	4	2
현 원	9	1	2	4	1	1
증 감					▵1	1

※ 2017. 7월 상반기 정기 인사시 체전기획계 신설 예정

□ 사  무  분  장

◦ 전국체전(장애인) 기본계획 및 세부추진 계획 수립, 보고회 개최

◦ 전국체전(장애인) 익산시운영위원회 및 시민서포터즈 구성 운영

◦ 전국체전(장애인) 홍보 및 문화축제 지원

◦ 전국체전(장애인) 종합운동장 개선공사 및 종목별 경기장 개․보수

◦ 전국체전(장애인) 경기장 공․승인 및 시설점검

◦ 전국체전(장애인) 관련 국․도비 예산 확보

2017 예산집행실적

【 2017. 6. 15. 현재 】                                        (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율	비고
전국체전담당관				23,717,879	569,339	23,148,540	2%
	2018년전국체전			23,712,879	568,339	23,144,540	2%
		2018년 전국체전 기반시설		23,423,000	457,285	22,965,715	2%
			전국체전시설건립	23,423,000	457,285	22,965,715
		2018년 전국체전 대회운영		289,879	111,054	178,825	38%
			전국체전기획운영	289,879	111,054	178,825
	행정운영경비 (전국체전담당관)			5,000	1,000	4,000	20%
		기본경비		5,000	1,000	4,000
			기본경비	5,000	1,000	4,000

□ 이월사업 예산액(명시,사고)

(단위 : 천원)

과 목				예산액	이 월 액			집행액
					계	명시이월	사고이월
		2018년 전국체육 대회지원		11,994,000	11,856,079	11,394,000	462,079	137,921
			경기장리모델링사업	9,854,000	9,716,079	9,254,000	462,079	137,921
			장애인편의시설설치사업	2,140,000	2,140,000	2,140,000	0	0

◦ 이월예산 집행액(2017. 4.) : 4,874,340천원

▸ 명시이월 : 4,412,261천원.

▸ 사고이월 :  462,079천원.

2017 상반기 성과 및 반성

□ 성      과

◦ 2018년 성공적인 체전준비를 위한 기반 구축

▸ 전국체전담당관 신설 : 2017. 1. 23.

▸ 종합운동장 개선공사 착공 : 2017. 3. 20.

◦ 공모사업 선정 국비확보로 지방재정 확충 기여 : 1개사업 930백만원

▸ 종합운동장 및 보조경기장 우레탄 교체 사업

◦ 전국체전 시민서포터즈 구성․운영

▸ 모집인원 :  2,986명

▸ 시민서포터즈 발대식 : 2017. 5. 26.

◦ 전국체전․장애인체전 익산시 운영위원회 구성

▸ 위원구성 : 70명

▸ 위 원 장 : 시장(당연직)

▸ 고    문 : 국회의원, 시의회 의장, 도의원, 대학총장 등

▸ 부위원장 : 부시장, 경찰서장, 교육장, 소방서장, 세무서장, 체육회부회장 등

▸ 위     원 : 기관단체, 언론, 경제금융, 의료, 문화예술, 봉사 직능 등

◦ 전국 4대체전 지역경제 파급효과 연구 용역

▸ 전국체육대회․전국장애인체육대회           : 2018년 10월

▸ 전국소년체육대회․전국장애학생체육대회       : 2019년  5월

▸ 전국생활체육대축전                         : 2020년  6월

2017 주요업무 추진상황

		전국체전 종합운동장 개선공사 전국체전․장애인체전 운영 전국체전․장애인체전 홍보 추진 전국체전 시민서포터즈 구성․운영 전국체전 숙박시설 확충 전국체전 개․폐회식 주차장 확보

-7-

1		전국체전 종합운동장 개선공사

□ 사 업 개 요

◦ 공 사 명 : 익산종합운동장 개선공사

◦ 위    치 : 익산시 무왕로 1397(익산종합운동장)

◦ 공사기간 : 2017. 3월 ~ 2018. 6월

◦ 공 사 비 : 336억(국비 101억 도비 90억 시비 145억)

◦ 대상시설

구 분	주경기장	실내체육관	보조경기장	비 고
연 면 적	13,684㎡	18,978㎡	20,500㎡
준공년도	1991년	1997년	2008년
용 도	관람집회시설	관람집회시설
수용인원	18,000명	6,000명

□ 상반기 추진사항

◦ 종합운동장 개선공사 계약 체결                     : 2017. 3. 15.

◦ 종합운동장 개선공사 착공                          : 2017. 3. 20.

▸건설사업관리(감리) : 목양건축사사무소 / 길건축사사무소

▸건축공사 : 흥한건설 / 성웅종합건설

▸전기공사 : 금화전기

▸통신공사 : 썬더테크놀로지

▸소방공사 : 대성전기공업사

◦ 추진공정 : 철거 및 보강공사(공정율 15%)

◦ 종합운동장 개선공사 지역업체 및 지역자재 사용협약 : 2017. 4. 26.

□ 하반기 추진계획

◦ 종합운동장 개선공사 추진(계속)                   :  ~ 2018. 6월

▸종합상황실 설치 및 시도사무실 조성, 관람석 개선 등

▸육상 제1종 공인 우레탄 트랙 설치

▸전기, 통신, 소방, 기계설비 공사

2		전국체전․장애인체전 운영

□ 대 회 개 요

◦ 기    간 : 2018.  10월중(전국체전 7일간 / 장애인체전 5일간)

◦ 장소/종목 : 14개시･군 67개소 /고등･대학･일반부 47개 종목 (정식 45, 시범 2)

‣ 익산시 개최 : 14종목 19개소(장애인 6종목 8개소)

(육상, 축구, 배구, 야구, 소프트볼, 복싱, 보디빌딩, 펜싱, 골프, 배드민턴, 트라이애슬론, 검도, 에어로빅, 볼링)

◦ 주    최 : 대한체육회 / 대한장애인체육회

◦ 주    관 : 전라북도, 전라북도교육청, 전라북도(장애인)체육회, 주 개최지(익산시)

◦ 참가인원 : 37,000여명(전국체전 30,000명, 장애인체전 7,000명)

□ 상반기 추진사항

◦ 전국체전담당관 신설                             : 2017. 1. 23.

◦ 전국체전 부서별 추진계획 보고회 개최            : 2017. 2. 10.

◦ 전국체전 주개최지 벤치마킹(강릉, 아산, 충주)     : 2017. 2..~ 6.

◦ 전국체전 부서별 추진계획 보고회 개최            : 2017. 2. 10.

◦ 전국체전 성공개최 유관기관(단체) 업무협의        : 2017. 2. 21.

◦ 전국 4대체전 지역경제 파급효과 연구 용역      : 2017. 3. 29. ~ 5. 28.

◦ 전국체전 성공개최 주요부서 시달 회의            : 2017. 4. 14.

◦ 전국체전 익산시 운영위원회 구성                 : 2017. 5. 15.

□ 하반기 추진계획

◦ 전국체전 익산시운영위원회 창립 회의             : 2017. 8.

◦ 전국체전(장애인) 세부추진계획 수립(도 연계)       : 2017. 8.

◦ 전국체전(장애인) 운영 예산 소요 판단 및 확보     : 2017. 9.

◦ 전국체전(장애인) 보고회 실시          : 2017. 9. ~ 2018. 10.

3		전국체전․장애인체전 홍보 추진

□ 대 회 개 요

◦ 기    간 : 2018.  10월중(전국체전 7일간 / 장애인체전 5일간)

◦ 장소/종목 : 14개시･군 67개소 /고등･대학･일반부 47개 종목 (정식 45, 시범 2)

‣ 익산시 개최 : 14종목 19개소(장애인 6종목 8개소)

(육상, 축구, 배구, 야구, 소프트볼, 복싱, 보디빌딩, 펜싱, 골프, 배드민턴, 트라이애슬론, 검도, 에어로빅, 볼링)

◦ 주    최 : 대한체육회 / 대한장애인체육회

◦ 주    관 : 전라북도, 전라북도교육청, 전라북도(장애인)체육회, 주 개최지(익산시)

◦ 참가인원 : 37,000여명(전국체전 30,000명, 장애인체전 7,000명)

□ 상반기 추진사항

◦ 전국체전 언론 홍보                               : 2017. 1. ~ 6.

▸기획보도 3회 / 언론보도 20회

◦ 전국체전 개최 홍보 이벤트(페이스북)              : 2017. 3.

◦ 기관․단체 전국체전 홍보 교육                   : 2017. 3. ~ 6.

▸운수종사자 보수교육, 익산교육 아카데미, 지역민방위대장 등

◦ 전국체전 마스코트, 엠블럼, 포스터 공모(전북도)    : 2017. 5.  1.

◦ 전국체전 홍보 로고송 공모                       : 2017. 5. 22.

□ 하반기 추진계획

◦ 전국체전(장애인) 대중교통 랩핑 홍보             : 2017.  7.~12

◦ 전국체전(장애인) 홍보물 제작                    : 2017.  8.

◦ 전국체전(장애인) 응원 피켓 만들기 이벤트        : 2017.  9.

◦ 전국체전(장애인) D-day 카운터기 설치            : 2017. 10.

◦ 전국체전(장애인) 홍보 동영상 제작               : 2017. 10.

4		전국체전 시민서포터즈 구성․운영

□ 서포터즈 현황

◦ 운영기간 : 2017. 3. ~ 2019. 5.(소년체전 종료시까지)

◦ 인    원 : 2.986명(남 1,679명 / 여 1,307명)

◦ 조직구성 : 단장, 부단장, 8개 분과위원

◦ 주요역할

▸전북도 시․군 전국대회 및 우리시 체육, 문화 행사시 체전 홍보

▸참가 선수단 환영․환송 행사 및 경기관람 응원 참여

□ 상반기 추진사항

◦ 전국체전 시민서포터즈 모집                 : 2016. 11. ~ 2017. 02.

◦ 제14회 익산 사랑의 전국마라톤대회 서포터즈 활동  : 2017. 04. 08.

◦ 제54회 전라북도 도민체육대회 서포터즈 활동      : 2017. 04. 28.

◦ 시민서포터즈 분과별 운영 간담회 실시             : 2017. 05. 10.

◦ 익산서동축제 2017 서포터즈 활동    : 2017. 5. 12. ~ 14.

◦ 전국체전 시민서포터즈 발대식                    : 2017. 05. 26.

◦ 세계 태권도 선수권대회 서포터즈 활동          : 2017. 06. 29.

□ 하반기 추진계획

◦ 익산시장기 전국리틀야구대회 활동             : 2017. 07. 05

◦ 익산시장배 전국 동호인 족구대회 활동          : 2017. 09. 17.

◦ 제98회 전국체육대회(충주) 활동                : 2017. 10. 20.

◦ 전국청소년 호국무예특공무술내회 활동        : 2017. 10. 21.

◦ 익산시장배 전국장애인 론볼대회 활동        : 2017. 11. 02.

5		전국체전 숙박시설 확충

□ 현     황

◦ 숙박시설

구 분	총 계	숙 박 업				청 소 년 수련시설	농촌체험 휴양마을	농어촌 민 박
		소계	관광호텔	여관업	굿스데이
업소수	194	182	2	179	1	1	6	5
객실수	4,585	4,469	78	4,360	31	40	39	37
수용능력	9,617	8,938	156	8,720	62	248	246	185

◦ 숙박 현황 예상 분석(80% 가동율)

숙박예상 인원	수용가능 인원 (9,617명 × 80%)	부 족	비 고
8,500명	7,600명	900명

◦ 숙박시설 세부추진 계획 위생과 별도 수립 추진

□ 상반기 추진사항

◦ 전국체전대비 숙박업소 현황조사(위생과)       : 2017 01. 09. ~ 13.

◦ 여산 부사관학교 간부숙소 사용 협의         : 2017 03. 16.

◦ 원불교 중도 훈련원 숙소 사용 협의             : 2017. 03. 16.

◦ 숙박업소 사업주 전국체전 대비 교육(위생과)      : 2017. 04. 07.

◦ 컨벤션 호텔 신축 공사 착공(투자유치과)          : 2017. 06. 23.

□ 하반기 추진계획

◦ 여산 부사관학교 및 원불교 중도 훈련원 협의   : 2017. 09.

◦ 숙박업소 사업주 전국체전 대비 교육 및 협조(위생과) : 2017. 10.

◦ 제98회 전국체육대회(충주) 숙박시설 운영 견학    : 2017. 10. 20.

6		전국체전 개․폐회식 주차장 확보

□ 주차수요(예상)

필요면수	주차장 운영			비 고
	계	종합운동장	임시주차장
4,400	4,960	800	4,160

□ 상반기 추진사항

◦ 임시 주차장 확보 추진                     : 2017 01 ~ 2017. 06.

구 분	규 모	산출근거	설치면수	비 고
계			4,160
쓰레기야적장 부지	30,000㎡	15㎡/대	2,000
신재생자원센터 주변 도로(양측)	3,200m	6m/대	530
제2공단내 도로(양측)	3,000m	6m/대	500
제2공단내 19호 공원 축구장	8,700㎡	15㎡/대	570
공설운동장 야구장(흙구장)	8,440㎡	15㎡/대	560

◦ 쓰레기 야적장 임시 주차장 사용 업무 협의(청소자원과)  : 2017. 01. 20.

□ 하반기 추진계획

◦ 도로변 임시 주차장 사용 협의(익산경찰서)        : 2017. 09월중

◦ 팔봉초등학교 임시 주차장(예비) 사용 협의        : 2017. 09월중    ◦ 제98회 전국체육대회(충주) 임시주차장 벤치마킹   : 2017. 10. 20.