도시개발과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2017 예산집행실적
□	2017 상반기 성과 및 반성
□	2017 주요업무 추진상황

비전 및 중점과제 추진 방향

	비 전
시민이 행복한 품격도시 익산건설을 위해 지역 균형적인 도시계획과 개발 및 관리

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	미래지향적인 도시계획수립 인간과 환경을 중시하는 도시개발사업 추진 시민중심의 도시문제 해소

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	시민이 공감하는 도시관리계획으로 지역간 균형발전 도모 친환경적이고 생활을 중시하는 도심 및 지역개발 원도심․생활환경 취약지역 중점개발로 여건개선 및 도시재생

일   반   현   황

□ 기     구

						도시개발과
도시행정			도시계획			도시개발				도시재생			도시경관			자전거정책

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별							비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	계약
정 원	26	1	1	6	7	7	4
현 원	23	1	1	7	6	4	4
증 감	△3			1	△1	△3

□ 사 무 분 장

◦ 도시행정  :  국․과․소 행정 종합기획 및 예산편성, 개발행위 허가

◦ 도시계획  :  도시기본계획 및 도시관리계획 수립, 도시계획 시설결정

◦ 도시개발  :  도시계획 도로사업, 자전거도로 계획수립 및 시행

◦ 도시재생  :  도시재생활성화사업, 새뜰마을사업

◦ 도시경관  :  경관기본계획 및 공공디자인기본계획수립, 경관가이드라인 수립

◦ 자전거정책  :  자전거정책 수립, 자전거도로 계획수립 및 시행

□ 국토의 용도구분

(단위 : ㎢, %)

구 분	총 면 적	고 시 면 적				비 고
		도시지역	관 리 지 역	농림지역	자연환경 보존지역
면 적	506.925	76.091	214.809	194.046	21.979
비율(％)	100	15.0	42.4	38.3	4.3

□ 도시지역내 용도지역

(단위 : ㎢, %)

구 분	계	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	비고
면 적	76.091	17.835	1.869	10.888	45.499
비율(％)	100	23.4	2.5	14.3	59.8

□ 도시지역내 용도지구

(단위 : 천㎡)

지구명	계	경관지구	미관지구	고도지구	방화지구	보존지구 (역사문화환경 보존지구)	취락지구 (자 연 취락지구)	비 고
지구수	135	3	29	10	9	1	83
면 적	20,260	12,680	2,478	985	1,180	202	2,735

□ 도시계획시설 결정 및 집행현황

(단위 : ㎡, %)

시 설 명		시설결정		집행시설		미집행시설		집행률 (%)
		개소	면적	개소	면적	개소	면적
총 계		2,089	31,982,534	1,674	26,074,817	415	5,907,717	81.5
도로	소 계	1,529	12,570,379	1,158	11,289,107	371	1,281,272	89.8
	광 로	6	1,245,244	5	1,160,250	1	84,994	93.2
	대 로	68	4,171,693	43	3,797,170	25	374,523	91.0
	중 로	359	4,511,828	298	4,119,791	61	392,037	91.3
	소 로	1,096	2,641,614	812	2,211,896	284	429,718	83.7
공원	소 계	102	5,824,791	81	1,867,650	21	3,957,141	32.1
	근린공원	49	5,192,301	31	1,451,990	18	3,740,311	28.0
	역사공원	2	76,461	1	50,593	1	25,868	66.2
	수변공원	2	28,021	1	8,475	1	19,546	30.2
	어린이공원	38	87,906	38	87,906	0	0	100.0
	소공원	9	35,083	9	35,083	0	0	100.0
	문화공원	1	35,279	1	35,279	0	0	100.0
	묘지공원	1	369,740	0	198,324	1	171,416	53.6
녹지	소 계	91	1,132,871	76	519,263	15	613,608	45.8
	완충녹지	75	1,071,947	61	461,909	14	610,038	43.1
	경관녹지	12	55,234	11	51,664	1	3,570	93.5
	연결녹지	4	5,690	4	5,690	0	0	100.0
기타	소 계	367	12,454,493	359	12,398,797	8	55,696	99.6
	주차장	49	149,033	49	149,033	0	0	100.0
	광 장	32	678,034	26	662,645	6	15,389	97.7
	공공청사	14	189,497	14	189,497	0	0	100.0
	유원지	1	31,200	0	0	1	31200	-
	운동장	1	260,000	0	250,893	1	9107	96.5
	기 타	270	11,146,729	270	11,146,729	0	0	100.0

2017 예산집행실적

【 2017. 6. 15.현재 】                                       (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업		예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
도시개발과					18,262,278	6,338,088	11,924,190	34.70
	도시개발관리				17,811,477	6,294,348	11,517,129	35.34
		도시계획			1,068,142	186,500	881,642	17.46
			도시계획관리		1,066,142	184,500	881,642	17.31
				일반운영비	60,536	9,000	51,536	14.87
				여비	42,000	20,500	21,500	48.81
				업무추진비	11,200	5,000	6,200	44.64
				시설비 및 부대비	652,406	0	652,406	0
				자치단체등자본이전	300,000	150,000	150,000	50
			도시계획관리(보조)		2,000	2,000	0	100
		도시계획도로개설(대로)			4,568,214	2,167,958	2,400,256	47.46
			산업도로(대로 1류2호)확장공사		1,098,809	978,430	120,379	89.04
			목천동원주@~우석장례예식장간도로확장		535,058	260,345	274,714	48.66
			도‧농 연결도로개설		100,000	1,500	98,500	1.5
			안전한 보행환경조성사업		1,908,290	918,100	990,190	48.11
			마한로 미개설구간 도로개설		500,000	0	500,000	0
			KTX서부역사진입로확장사업		426,056	9,583	416,473	2.25
		도시계획도로개설(중로)			3,205,452	775,577	2,429,875	24.20
			석방육교~도축장간도로개설		60,000	55,765	4,235	92.94
			황등 중로(2차)도로개설		299,300	1,900	297,400	0.63
			남부지구중로2류43호도로개설		157,641	91,033	66,608	57.75
			춘포면사무소~춘포역간도로개설		200,000	0	200,000	0
			모현동 배산~장신택지간 도로개설		2,488,511	626,879	1,861,632	25.19
		도시계획도로개설(소로)			3,300,096	1,290,287	2,009,809	39.10
			구 모현동사무소 옆 도로개설		1,023,410	507,813	515,597	49.62
			금마시장 뒤 도로개설		250,000	0	250,000	0
			함열농협 옆 도로개설		52,056	1,075	50,981	2.06
			영등동 청아파트옆외 3개노선도로개설		30,000	22,773	7,227	75.91
			함열미력리(소로1류8호)도로개설		735,542	302,063	433,479	41.07

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
			미불용지 보상	223,664	8,023	215,641	3.59
			황등도서관진입로확장공사	419,586	277,257	142,329	66.08
			송학동 망기마을진입로 개설	405,838	171,283	234,555	42.2
			송학동 학곤선 도로개설	160,000	0	160,000	0
		신규 도시개발사업		875,000	130,548	744,452	14.92
			용안면 한양식당 옆도로개설	240,000	67,455	172,545	28.11
			모현동 롯데슈퍼 옆 도로개설	200,000	0	200,000	0
			송학동 포스코아파트 앞 도로개설	115,000	62,149	52,851	54.04
			남중동 소로2류144호도로개설	100,000	0	100,000	0
			어양동함지박옆가각부개선공사	140,000	944	139,056	0.67
			마동도서관~연국사간 인도설치	10,000	0	10,000	0
			석왕동 길자동차 앞 선형개선 공사	70,000	0	70,000	0
		자전거도로 이용시설 활성화사업		285,000	116,404	168,596	40.84
			자전거도로 이용시설 활성화사업	285,000	116,404	168,596	40.84
		도시재생		4,110,902	1,439,178	2,671,724	35.00
			취약지역개조 (익산역주변지구새뜰마을사업)	3,069,906	1,365262	1,704,644	44.47
			도시재생사업	104,598	16,300	88,298	15.58
			취약지역개조 (동사동월담지구새뜰마을사업)	836,398	13,316	823,082	1.59
			지역역량강화 (도시활력증진지역개발)	100,000	44,300	55,700	44.3
		도시경관디자인 조성		398,671	187,896	210,775	47.13
			도시디자인	343,601	149,800	193,801	43.6
			도시경관 개선사업	10,500	0	10,500	0
			경관협정 지원사업	44,570	38,096	6,474	85.47
	재무활동			140,478	0	140,478	0
		내부거래지출		140,000	0	140,000	0
		보전지출		478	0	478	0
	행정운영경비			31,269	21,386	9,883	68.39
			기본경비	31,269	21,386	9,883	68.39
	특별회계			279,054	22,354	256,700	8.01
		남부지구정비사업		65,488	20,489	44,999	31.29
		장기미집행도시계획		213,566	1,865	211,701	0.87

2017 상반기 성과 및 반성

□ 성      과

◦ 2017 대한민국 국토경관디자인대전 공공디자인 부분 우수 기관 선정

▸ KTX 주변 가로환경 안전 디자인 개선사업(전북도 경관디자인시범사업 공모)

- 사업기간 : 2015. 2. ~ 2016. 12.

- 사 업 비 : 740백만원(도비370, 시비370)

- 사업내용 : 커뮤니티 공간 조성, 미륵사지조형물 설치, 주변가로환경 정비 등

◦ 도시계획도로 개설을 통한 시민 편익증진 기여

▸산업도로(대로 1류2호)확장공사 준공(L=2.65km, B=20→35)

▸선화로안전한보행환경조성사업 1구간 준공(L=1.26km, B=20→35)

▸목천동 원주아파트~우석장례식장간 도로개설(L=670m, 공정율 90%)

◦ 익산시민 자전거 보험 가입으로 자전거 이용 시민 안전성 확보

▸가입대상 : 익산시에 주민등록을 두고 거주하는 모든 시민

▸보험기간 : 2017. 3. 2. ~ 2018. 3. 1.

▸보험금액 : 100백만원

▸보장내용 : 사망 및 후유장애, 진단위로금, 사고처리 관련

□ 반      성

◦ 도시계획도로 개설사업의 경우 예산투입의 선택과 집중 미흡으로 장기간

지연되고 있어 마무리 위주의 사업 추진 노력 필요

2017 주요업무 추진상황

		산업도로(대로1류2호)확장사업 도시관리계획(재정비)수립용역 선화로 안전한보행환경 조성사업 KTX 익산역 주변지구 새뜰마을사업 동산동 월담지구 새뜰마을사업 익산시기본경관계획재정비수립용역 목천동원주아파트～우석장례식장 도로확장

1		산업도로(대로1류2호) 확장 공사

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  :  팔봉 인디안매장 ~ 도시지역경계(덕기동 현대주유소)

◦ 사업규모  :  L=2,516m , B=20⇒35m(대로1류2호)

◦ 사업기간  :  2008. 04. ~ 2017. 6.

◦ 사업내용  :  도시계획도로확장

◦ 총사업비  :  10,300백만원(공사 5,513･보상비 4,787)

※ 연도별 투자계획                                      (단위 : 백만원)

사 업 명	구분	총계	~2014년	2015년	2016년	2017년~
산업도로 확장공사	소계	10,300	6,731	1,022	2,061	486
	국비	3,732	3,732	-	-	-
	시비	6,523	2,999	1,022	2,016	486

□ 상반기 추진실적

◦ 7차분 착공	2017.  3.

◦ 7차분 공사 준공	2017.  4.

▸준공시설물 관리이관(도로, 상․하수도, 가로등, 신호등)

◦ 가로수 식재공사 착공	2017.  5.

□ 하반기 추진계획

◦ 가로수 식재공사 준공	2017.  10.

2		도시관리계획(재정비) 수립용역

○	『국토계획법』제34조에 의거한 법정계획으로 도시관리계획에 대한 타당성 여부를 전반적으로 재검토하여 정비하고자 하는 것으로 익산시 도시여건 변화를 반영한 도시계획 정비를 하고자 함.

□ 사 업 개 요

◦ 사업범위 : 익산시 전지역(506.925㎢) / 10년계획

◦ 사업기간 : 2016. 5 ~ 2018. 5월(24개월)

◦ 사 업 비 : 842백만원

◦ 내 용 : 익산시 도시관리계획 전반에 대한 재검토

▸익산시 여건변화를 수용한 용도지역․지구, 도시기반시설 계획 등 전반 재검토

▸관련법 개정 등 제도변화에 따른 후속조치(토지적성평가, 재해취약성분석 등)

◦ 도 급 자 : ㈜한국종합기술, 성원기술개발(주), ㈜한아

□ 상반기 추진실적

◦ 현황조사 및 분석	2016. 5 ~ 2017. 5.

▸지역현황조사, 민원분석 및 현장조사

▸토지적성평가, 재해취약성분석, 교통성, 경관성, 사전재해영향성검토

◦ 장기미집행 도시계획시설 폐지(변경) 검토	2017. 1. ~ 2017. 6.

□ 하반기 추진계획

◦ 장기미집행 도시계획시설 폐지(변경) 추진	2017. 7. ~ 2017. 9.

▸주민 및 의회 의견청취, 도시계획위원회 심의 등 절차 이행

◦ 도시관리계획 재정비(안) 작성	2017. 7. ~ 2017. 9.

◦ 주민 및 의회 의견청취등 관련 절차 이행	2017. 10. ~ 2018. 1.

3		선화로 안전한 보행환경 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  : 중앙체육공원 ~ 원팔봉 삼거리

◦ 사업규모  : L=2,100m , B=20m⇒35m(대로1류5호)

▸1구간(중앙체육공원∼2공단사거리) L=1,260m

▸2구간(2공단사거리∼원팔봉삼거리) L=840m

◦ 사업기간  : 2010. 01. ～ 2017. 12.

◦ 사업내용  : 도시계획도로확장

◦ 총사업비  : 10,370백만원(공사비 5,030･보상비 5,340)

※ 연도별 투자계획                                (단위 : 백만원)

사 업 명	구분	총계	2014년이전	2015년	2016년	2017년~
선화로 안전한 보행환경 조성사업	소계	10,370	6,561	917	1,691	1,201
	국비	4,000	3,300	-	700	-
	시비	6,370	3,261	917	991	1,201

□ 상반기 추진실적

◦ 1구간(6차분) 착공	2017.  3.

◦ 1구간(6차분) 공사 준공	2017.  5.

▸준공시설물 관리이관(도로, 상․하수도, 가로등, 신호등)

□ 하반기 추진계획

◦ 2구간(4차분) 공차 착공	2017. 6.

◦ 2구간(4차분) 공차 준공	2017. 10.

4		KTX 익산역 주변지구 새뜰마을사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 창인동2가 1-160번지 일원 (면적 : 35,089㎡)

◦ 사업기간 : 2015. ~ 2018.(4개년)

◦ 총사업비 : 6,924백만원(국비 4,368, 도비 616, 시비 1,940)

◦ 사업내용 : 도로개설, 철도변 완충녹지 정비, 도시가스공급, 경로당

신축, 집수리, 주민역량강화 및 마을공동체 지원사업 등

◦ 예산현황

(단위:백만원)

구 분	총사업비	2016년 이전	2017년			2018년
			소계	확보	미확보
총계	6,924	2,985	2,000	2,000		1,939
국비	4,368	2,090	1,070	1,070		1,208
도비	616	268	154	154		194
시비	1,940	627	776	776		537

□ 상반기 추진실적

◦ 도시가스 공급사업 시행	2017. 4. 27.

◦ 주민공동이용시설 신축공사 착공	2017. 4. 28.

□ 하반기 추진계획

◦ 도로개설공사(2공구) 추진	2017.  7.

◦ 집수리 및 슬레이트 지붕개량사업 추진	2017.  7.

◦ 도시가스 공급사업 완료	2017.  9.

5		동산동 월담지구 새뜰마을사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 동산동 356번지 일원(동산동 월담지구)

◦ 사업기간 : 2016 ~ 2019년(사업면적 약50,456㎡)

◦ 사 업 비 : 3,849백만원(국비 2,694, 도비 347, 시비 808)

◦ 사업내용 : 주택정비 지원,  안전확보, 생활 ∙ 위생인프라, 마을공동체  지원사업,  주민역량강화사업 등

◦ 예산현황

(단위:백만원)

구 분	총사업비	2016년 이전	2017년			2018년
			소계	확보	미확보
총계	3,849	557	357	357		2,935
국비	2,694	390	250	250		2,054
도비	347	50	32	32		265
시비	808	117	75	75		616

□ 상반기 추진실적

◦ 우선추진사업 국토부 승인(축대 위험지구)	2017. 5.

◦ 축대 위험지구 개선공사 실시설계	2017. 6.

□ 하반기 추진계획

◦ 새뜰마을사업 마스터플랜 수립용역 승인	2017. 8.

◦ 우선추진사업(진입로 축대개선공사) 착공	2017. 8.

6		익산시 기본경관계획 재정비 수립용역

□ 사 업 개 요

◦ 용역대상 : 익산시 전지역(506.925㎢)

◦ 용역기간 : 2017. 5. ~ 2018. 5.(12개월)

◦ 용 역 비 : 286백만원

◦ 내    용 : 익산시 기본경관계획 전반에 대한 재검토 및 공공디자인

진흥계획 수립

▸ 기본경관계획 재정비 : 경관․미관지구, 중점관리구역 재정비

▸ 공공디자인 진흥계획 수립 : 공공시설물디자인 가이드라인 수립

◦ 용역수행 : ㈜도화엔지니어링, ㈜도시경관연구소 율

□ 상반기 추진실적

◦ 용역 착수	2017. 5. 23.

◦ 용역 착수 보고회	2017. 6. 2.

□ 하반기 추진계획

◦ 현황조사 및 분석, 계획(안) 작성	2017. 7. ~ 2017. 12.

◦ 주민공청회 및 관련기관 협의	2018. 1. ~ 2018. 2.

◦ 의회의견청취	2018. 3.

◦ 경관위원회 심의	2018. 4.

◦ 용역 완료	2018. 5.

7		목천동 원주아파트~우석장례식장 도로 확장

□ 사 업 개 요

◦ 위    치  : 익산시 목천동 1187번지(원주아파트) 일원

◦ 사업규모  : L=670m , B=20m⇒35m(대로1류1호)

◦ 사업기간  : 2009. 03. ～ 2018. 12..

◦ 사업내용  : 도시계획도로확장

◦ 총사업비  : 4,900백만원(공사비1,000･보상비 3,900)

※ 연도별 투자계획                                   (단위 : 백만원)

사 업 명	구분	총계	2014년이전	2015년	2016년	2017년	2018년이후
목천동원주아파트~ 우석장례식장도로확장	소계	4,900	2,581	827	196	534	762
	국비	0	-	-	-	-	-
	시비	4,900	2,581	827	196	534	762

□ 상반기 추진실적

◦ 공사구간 감정평가 및 보상 완료

◦ 도로 확･포장 공사 마무리 단계(공정율 90%)

▸우수공, 상수공, 인도포설, 포장등

□ 하반기 추진계획

◦ 가로수 식재 공사 추진	2017. 9. ~ 10.(나무식재시기 적용)

◦ 공사 준공	2017. 10.