건설과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2017 예산집행실적
□	2017 상반기 성과 및 반성
□	2017 주요업무 추진상황

비전 및 중점과제 추진 방향

	비 전
아름답고 깨끗한 녹색도시 건설

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦ ◦	시민에게다가서는 보상행정으로 양질의 서비스제공 도·농균형발전 및 거점개발 추진을 위한 도로시설확충 환경을 우선으로 하는 생태하천 조성으로 시민 휴식공간 제공 장애인과 여성들을 위한 시민중심의 밝고 안전한 거리조성

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	공익사업을 위한 적극 협의보상 도로망 확충으로 도시발전 기여 도로확포장으로지역간소통원활및통행불편해소 생태하천정비로생활환경개선및주민편익도모 조명시설설치로보행환경개선및야간통행불편해소

일  반  현  황

□ 기          구

					건 설 과
건설행정				도로시설			하천시설					하천관리					가로등관리

□ 정  ․  현  원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	22		1	5	11	3	2
현 원	21		1	8	6	4	2
증 감	△1			3	△5	1

□ 사  무  분  장

◦건설행정 : 국 소관사업 및 유관기관 용지매입, 토지수용 재결

소유권이전 촉탁 및 상속등기, 기타 보상관련 업무전반

◦도로시설 : 철도건널목 개량사업, 고속국도, 국도, 지방도 등 사업관련

협의  시·군도, 농어촌도로 확·포장사업 추진

◦하천시설 : 하천기본계획 수립, 지방하천 개량사업, 소하천 정비사업

◦하천관리 : 하천제방관리, 골재채취허가, 하천사용료 징수 부과,

생태하천관리

◦가로등관리: 가로등· 보안등시설 종합계획, 유지보수관리, 생활민원

□ 하천 현황

(단위:km)

구 분	총 연 장		하천정비기본계획수 립 현 황		정비대상	개수연장	미개수 연 장	개수율
	개 소	연 장	개 소	연 장
합 계	92	323.633	85	305.673	323.633	153.779	169.854	47%
국가하천	3	34.2	3	34.2	34.2	34.2	-	100%
지방하천	27	187.23	20	169.27	187.23	92.41	94.82	49%
소 하 천	62	102.203	62	102.203	102.203	27.169	75.034	27%

□ 하 천 점 용 허 가  현황(2017년)

필 지 수				면 적(㎡)
계	답	전	대지	계	답	전	대지
613	438	110	65	334,069	257,490	64,373	12,206

□ 가로등․보안등 현황

계	보 안 등	가 로 등
27,833등	18,516등	9,317등

□ 차량보유 현황

가로등유지보수차량	하천관리차량
고가사다리차 3대	91러7428 더블캡 1대, 오토바이 1대

2017 예산집행실적

【 2017. 6. 15. 현재 】                                         (단위: 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
건설과				26,041,271	6,634,691	19,406,580	25
	도로시설관리			14,242,383	4,692,860	9,549,523	33
		시·군도농어촌도로확·포장		5,053,203	1,652,752	3,400,451	33
			금마갈산~서편간 도로확·포장	50,000	0	50,000	0
			용동 삼정-두무간 도로확·포장	1,629,210	309,135	1,320,075	19	명시
			오산북영선(금몽~남전)도로확·포장	805,381	452,834	352,547	56	명시 사고
			춘포학연익산천제방간도로확포장	458,091	150,887	307,204	33	명시
			망성신성~관산간도로확·포장	200,000	7,144	192,856	4
			오산장신~만석간도로확·포장	200,000	0	200,000	0
			미불용지매입비 (시군농어촌도로)	100,000	5,539	94,461	6
			용안창리법성간 도로확·포장	200,000	0	200,000	0
			금마누동~신촌간도로확포장공사	100,000	7,156	92,844	7
			오산외용(외검선)도로확포장	100,000	31,306	68,694	31
			시군농어촌도로확·포장사업추진	4,000	2,640	1,360	66
			군도23호선도로·확포장	1,206,521	686,111	520,410	57	명시
		주민숙원사업		38,260	19,132	19,128	50
			국내여비	37,360	18,682	18,678	50
			시책추진업무추진비	900	450	450	50
		철도건널목개량사업		5,436,000	3,020,976	2,415,024	56
			평화육교재가설	5,103,000	3,000,000	2,103,000	59	명시
			국도23호오산 교차로 램프설치	333,000	20,976	312,024	6
		교통관리개선사업		200,000	0	200,000	0
			군도19호선(하발~신평교차로)교행장서설치	200,000	0	200,000	0

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
		도로조명시설관리		3,514,920	1,529,268	1,985,652	44
			보안등신규설치	369,340	172,935	196,405	47	명시
			노후가로등정비	529,140	197,787	331,353	37
			가로등,보안등 유지관리	2,597,780	1,149,326	1,448,454	44
			가로등보수차량 운영유지비	18,660	9,220	9,440	49
	하천정비			11,723,792	380,941	11,342,851	3
		하천정비 및 유지관리		11,723,792	380,941	11,342,851	3
			하천제방유지 보수(자체)	824,828	15,120	809,708	2	명시 사고
			하천제방유지보수	82,899	8,476	74,423	10	명시
			소하천정비(생활)	2,540,156	148,204	2,391,952	6	명시 사고
			하천관리및유지관리 (해지천)	500,000	0	500,000	0
			국가하천유치관리 (4대강외)	294,312	0	294,312	0
			국가하천유치관리 (4대강)	595,221	6,820	588,401	1	명시
			왕궁천하천환경정비사업	5,546,376	202,321	5,344,055	4	게속비 이월
			만경강물문학관진입도로개설공사	1,300,000	0	1,300,000	0
			지방천하천정비	40,000	0	40,000	0
	재무활동(보전지출)			12,902	0	12,902	0
	행정운영경비			62,194	31,622	30,572	51
			인력운영비	35,000	13,855	21,145	40
			기본경비	27,194	17,767	9,427	65

2017 상반기 성과 및 반성

□ 성      과

◦ 건설공사 편입용지 협의보상으로 공익사업 추진에 기여

▸사업지구 50개소(계속사업 46개소, 신규사업 4개소) 83%협의 완료

▸춘포학연 익산천 제방간 확포장공사 등 2개소 미협의자 수용재결           및 공탁완료

◦ 농어촌도로 확포장으로 차량통행 불편해소 및 기계화 영농기반 구축으로 주민  편익 증대

▸오산 북영선 도로확포장공사

- 도로확포장 L=1.2㎞, B=8.0m

- 도로확포장 공사 추진 : 공정율 75%

▸용동 삼정~두무간 도로확포장공사

- 도로확포장 L=1.21㎞, B=8.0m

- 도로확포장 공사 추진 : 공정율 33%

▸춘포 학연~익산천제방간 도로확포장공사

- 도로확포장 L=0.74㎞, B=8.0m

- 도로확포장 공사 추진 : 공정율 65%

◦ 평화육교를 재가설하여 호남선 KTX 완전개통과 안전한 교통망 구축

▸평화육교 재가설 실시설계 용역 준공(3.31) 및 공사발주(4.14)

◦ 자연과 생명이 살아 숨쉬는 친환경을 우선으로 하는 하천 정비로 재해예방 및 시민 친수공간 조성

▸왕궁천 하천환경정비사업

- 2017년 국비 20억원 확보하여 사업추진

- 편입토지 분할 및 감정평가 절차 시행

▸동면천 하천환경정비사업

- 2017년 신규사업 확정으로 국비 4억원 확보로 사업착수

- 실시설계 용역 발주 및 착수.

▸소하천 정비사업

- 오동정천 : 교량 3개소 설치,  제방 뚝마루 포장 등 : 공사추진(공정률 : 95 % )

-  대판천 : 신규사업 확정 및 실시설계 용역 시행(L=1.2km) : 공사추진(공정률:  70% )

◦ 도로조명 설치로 밝은거리 조성하여 여성·노약자 등에게 안전한 보행 도모

▸노후 가로등 정비 281개소, 보안등 신규설치 176개소

▸가로등 ․ 보안등 민원처리 1,880건

□ 반      성

◦ 왕궁천 유관기관 협의지연으로 공사발주 및 착공 지연

▸익산지방국토관리청 조속협의토록 독려 및 협조체계 구축

◦ 보안등 신규설치기준 강화

▸보안등의 무분별한 설치를 억제하고 명확한 설치기준과 공공시설물을 목적에 맞게 설치될 수 있도록 관련 조례를‘17.04.14일자로 개정 하였으며, 향후 신규설치지역에 대하여 관련근거를 토대로 현장 여건을 면밀히 검토 후 추진토록 하겠음.

2017 주요업무 추진상황

		공익사업을위한용지보상 군도23호선도로확·포장 평화육교재가설 시·군도및 농어촌도로확·포장사업 왕궁천하천정비사업 동명천하천정비사업 소하천정비사업(오동정천,대판천) 만경강물문화관조성사업 도로조명조도개선

1		공익사업을 위한 용지보상

□ 사 업 개 요

구분	보상대상			보상실적				미보상 토지
	개소	필지	면적	개소	필지	면적	비율	개소	필지	면적
계	50	2,807	760,988	50	1,969	577,241	83%	50	838	183,747
도시개발과	26	733	122,910	26	433	62,846	65%	26	300	60,064
건 설 과	20	1,429	482,378	20	927	364,946	75%	20	502	117,432
도로관리과	1	41	7,965	1	26	6,163	77%	1	15	1,802
시민안전과	1	31	4,897	1	26	4,838	99%	1	5	59
타 기 관	2	573	142,838	2	557	138,448	98.3%	2	16	4390

□ 상반기 추진실적

◦ 보상계획 : 50개노선 2,807필지 760,988㎡

◦ 보상실적 : 50개노선 1,969필지 557,241㎡

□ 하반기 추진계획

◦ 보상계획 : 50개노선 838필지 – 183,747㎡(23,350백만원)

▸독려반 2개반 4명 편성 운영하여 적극적인 보상업무 추진

▸협의기간 내 미협의자 개별방문 및 면담으로 집중 독려

▸해당 사업자별 현지(읍․면․동) 출장 보상협의 및 계약체결

▸소액보상자, 노약자, 장애인 등 현지방문 보상민원 처리

▸원거리거주자(서울,경기등)왕복 우편이용 보상협의계약 대행처리

2		군도23호선 도로확포장

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 함열 용왕교차로(국도23호)~삼기일반산업단지

◦ 사업기간 : 2016. 1 ~ 2019. 12

◦ 사업규모 : L=3.4km, B=20m (2차로 ⇒ 4차로 확장)

◦ 총사업비 : 125억원(공사비 90, 보상비 31, 기타 4)

◦ 예산현황

(단위:백만원)

구 분	총사업비	2016년 이전	2017년			2018년 이후	비고
			소계	확보	미확보
총계	12,500	1,420	2,100	1,200	900	8,980
시비	12,500	1,420	2,100	1,200	900	8,980

□ 상반기 추진실적

◦ 편입토지 및 지장물 협의매수	: 2017. 1 ~ 6

▸보상현황 총 248필지 51,900㎡ 중 95필지 24,598㎡ (47%)

◦ 지방재정투자(재)심사 승인(자체심사)	: 2017. 5. 19

▸총사업비 변경 : 78.2억원 → 125.3억원

※ 최초 심사 승인일 : 2013. 5. 30.

□ 하반기 추진계획

◦ 편입토지 및 지장물 협의매수(예산한도 내)	: 2017. 7 ~ 12

3		평화육교 재가설

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 평화동 255번지 일원

◦ 사업기간 : 2015. 11 ~ 2019. 12

◦ 사업규모 : 평화육교 재가설 L=233m(4차로 ⇒ 6차로 확장)

▸기존교량 철거 및 재가설, 접속도로 포장, 편입토지 손실보상 등

◦ 총사업비 : 497억원(국비 307, 익산시 190)

◦ 사업시행자 : 한국철도시설공단

◦ 예산현황

(단위:백만원)

구 분	총사업비	2016년 이전	2017년			2018년이후	비고
			소계	확보	미확보
총계	49,700	6,600	10,100	7,100	3,000	33,000
국 비	30,700	1,000	7,100	7,100	-	22,600
시비	19,000	5,600	3,000	-	3,000	10,400

□ 상반기 추진실적

◦ 실시설계 용역 준공	: 2017. 3. 31

◦ 공사 발주	: 2017. 4. 14

▸호남고속철도 공용구간 노반공사와 병행

□ 하반기 추진계획

◦ 공사 착공	: 2017. 7월 초

◦ 공사 추진	: 2017. 7 ~ 12

4		시․군도 및 농어촌도로 확․포장사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 오산면, 용동면, 춘포면, 망성면, 금마면, 왕궁면, 용안면 일원

◦ 사업규모 :  L= 8.44km, B=5~20m

◦ 사 업 비 : 3,892백만원(9개사업, 이월예산 포함)

▸ 오산 북영선 도로확·포장공사                 :  805백만원

- L=1.2km, B=8m                (본 500, 명 281, 사 24)

▸ 용동 삼정~두무간 도로확·포장공사           : 1,629백만원

- L=1.21km, B=8m                 (명 658, 1회추경 971)

▸ 춘포 학연~익산천 제방간 도로확·포장공사    :  458백만원

- L=0.74km, B=8m                       (본 400, 명 58)

▸ 망성 신성~관산간 도로확·포장공사           :  200백만원

- L=0.91km, B=7m                             (본 200)

▸ 금마 누동~신촌간 도로확·포장공사           :  100백만원

- L=0.93km, B=7m                             (본 100)

▸ 오산 외용(외검선) 도로확·포장공사           :  100백만원

- L=0.8km, B=7m                              (본 100)

▸ 군도 19호선(하발~신평교차로) 교행장소 설치 :  200백만원

- L=0.61km, B=0.7~2.7m                       (본 200)

▸ 오산 장신~만석간 도로확·포장공사           :  200백만원

- L=1.61km, B=8m                        (1회추경 200)

▸ 용안 창리~법성간 도로확·포장공사           :  200백만원

- L=0.84km, B=8m                        (1회추경 200)

◦ 예산 확보 현황(계속사업)                         (단위 : 백만원)

노선수	사업량	총사업비	기투자	2017년	금후	비 고
22개	L=28.34㎞	49,002	9,259	4,071	35,672

□ 상반기 추진실적

◦ 오산 북영선 도로확·포장공사 추진(공정율 75%)

▸ 1차분(토공, 배수공 등) 준공	: 2017.  4. 28

▸ 2차분 추진(배수공,포장공 등)	: 2017.  1 ~ 6

◦ 용동 삼정~두무간 도로확·포장공사 추진(공정율 33%)

▸ 1차분(토공, 배수공 등) 준공	: 2017.  5. 19

▸ 2차분 추진(토공, 배수공 등)	: 2017.  1 ~ 6

◦ 춘포 학연~익산천 제방간 도로확·포장공사 추진(공정율 65%)

▸ 공사 추진(토공,배수공,포장공 등)	: 2017.  2 ~ 6

※ 미매입 토지 수용재결 결정(8필지, 495.6㎡)  : 2017.  5

◦ 망성 신성~관산간 도로확·포장공사

▸ 보상계획 열람공고 및 감정평가	: 2017.  1 ~ 3

▸ 토지매입 추진(19필지 2,524㎡)	: 2017.  3 ~ 6

◦ 금마 누동~신촌간 도로확·포장공사

▸ 보상계획 열람공고 및 감정평가	: 2017.  1 ~ 3

▸ 토지매입 추진(46필지 6,112㎡)	: 2017.  3 ~ 6

◦ 오산 외용(외검선) 도로확·포장공사

▸ 보상계획 열람공고 및 감정평가	: 2017.  1 ~ 3

▸ 토지매입 추진(14필지 2,582㎡)	: 2017.  3 ~ 6

◦ 군도 19호선(하발~신평교차로) 교행장소 설치

▸ 공사 발주	: 2017.  5. 17

▸ 공사 착공	: 2017.  6.  8

□ 하반기 추진계획

◦ 오산 북영선 도로확·포장공사 추진

▸ 2차분 추진(포장공, 부대공 등)	: 2017.  7 ~ 9

▸ 2차분 및 전체분 준공	: 2017.  9

◦ 용동 삼정~두무간 도로확·포장공사 추진

▸ 2차분 추진(토공,배수공 등)	: 2017.  7 ~ 12

▸ 3차분 추진(교량공, 포장공 등)	: 2017.  7 ~ 12

◦ 춘포 학연~익산천 제방간 도로확·포장공사 추진

▸ 공사 추진(토공, 배수공, 포장공 등)	: 2017.  7 ~ 12

▸ 공사 준공	: 2017. 12

◦ 망성 신성~관산간 도로확·포장공사

▸ 편입토지 및 지장물 협의매수 추진	: 2017.  7 ~ 12

◦ 금마 누동~신촌간 도로확·포장공사

▸ 편입토지 및 지장물 협의매수 추진	: 2017.  7 ~ 12

◦ 오산 외용(외검선) 도로확·포장공사

▸ 편입토지 및 지장물 협의매수 추진	: 2017.  7 ~ 12

◦ 군도 19호선(하발~신평교차로) 교행장소 설치

▸ 공사 추진(구조물공, 포장공 등)	: 2017.  7 ~ 10

▸ 공사 준공	: 2017. 10

◦ 오산 장신~만석간 도로확·포장공사

▸ 공사 발주 및 착공	: 2017.  9

▸ 공사 준공	: 2017. 12

◦ 용안 창리~법성간 도로확·포장공사

▸ 토지분할 측량 및 공부정리	: 2017.  7 ~ 8

▸ 편입토지 및 지장물 협의매수 추진	: 2017.  9 ~ 12

시 ․ 군도 및 농어촌도로 사업추진현황(계속사업)

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	사업개요	예 산 액				추진실적	노선명	비고
			총 사업비	기투자	2017년 예산액	금후 투자
	22개사업	L=28.34km B=8~20m	49,002	9,259	4,071	35,672
1	오산 북영선 도로확.포장	L=1.73km B=8.0m	2,526	2,026	500		공정율 25%	오산 204 (북영선)
2	용동 삼정~두무간 도로확.포장	L=1.21km B=8.0m	1,847	876	971		공정율 20%	용동 204 (삼두선)
3	춘포 학연~익산천간 도로확.포장	L=0.74km B=8.0m	569	169	400		용지 81%	춘포 201 (천서선)
4	군도23호 도로확포장공사	L=3.4km B=20.0m	12,500	1,420	1,200	9,880	용지 28%	군도 23호
5	망성 신성~관산간 도로확.포장	L=0.91km B=7.0m	1,365	306	200	859	용지 68%	망성 303 (신선선)
6	금마 누동~신촌간 도로확.포장	L=0.93km B=8.0m	1,411	405	100	906	용지 56%	금마 102 (누부선)
7	오산 외용(외검)선 도로확.포장	L=0.80km B=8.0m	1,000	117	100	783	용지 83%	오산 201 (외검선)
8	군도19호선(하발~신평 교차로) 교행장소 설치	L=0.20km B=5.0m	200		200			군도 19호
9	삼성동 하나로~ 외화간도로확.포장	L=1.55km B=8.0m	3,180	730		2,450	용지 63%	시도1201 (외화선)
10	오산 신수선 도로확.포장	L=1.5km B=7.0m	1,079	879		200	용지 93%	오산 203 (신수선)
11	오산 장신~만석간 도로확.포장	L=1.6km B=8.0m	1,786	274	200	1,312	용지 87%	오산 301 (용연선)	군도 1호
12	함라 진등 진입로 개설	L=1.43km B=6.5m	1,063	145		918	용지 85%	함라 301 (행진선)
13	함라 칠성~다은간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m	975	190		785	용지 85%	함라 201 (진다선)
14	망성 군도10호~ 금지간 도로확.포장	L=1.2km B=8.0m	1,872	180		1,692	용지 66%	군도 10호
15	왕궁 군도26호선 도로확.포장	L=1.7km B=8.0m	2,970	577		2,393	용지 75%	군도 26호
16	금마 갈산~서편간 도로확.포장	L=1.6km B=8.0m	2,829	229		2,600	용지 45%	금마 101 (서삼선)
17	왕궁 가좌마을 진입로확.포장	L=0.7km B=8.0m	1,116	103		1,013	용지 63%	왕궁 303 (사곡선)
18	왕궁 평화촌~평리간 도로확.포장	L=1.3km B=8.0m	3,445	180		3,265	용지 52%	왕궁 302 (신평선)
19	왕궁 온수~시대간 (황암~상발)확.포장	L=3.0km B=8.0m	2,803	296		2,507	용지 57%	군도 21호
20	춘포 토다리~덕동간 도로확.포장	L=1.0km B=8.0m	2,220	127		2,093	용지 9%	춘포 103 (신화선)
21	용안 창리~법성간 도로확.포장	L=0.84km B=8.0m	846	30	200	616	설계완료	용안 203 (자석선)
22	삼기 석라선 도로확포장	L=1.00km B=8.0m	1,400			1,400		삼기 203 (석라선)

5		왕궁천 하천정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 왕궁면 동용리 ~ 춘포면 익산천 합류점

◦ 사업기간 : 2015 ~ 2019

◦ 사 업 비 : 24,720백만원(국비 12,360 도비 4,944, 시비 7,416)

◦ 사업내용 : 하천정비 L=9.25km

▸ 제방축조 및 보축, 교량 재가설 등

□ 상반기 추진실적

◦ 왕궁천 하천정비사업 실시설계 용역 착수           : 2015. 06.

◦ 전라북도 및 익산청 사전 협의(1차)                 : 2016. 04.

◦ 주민설명회(1차)                                   : 2016. 06.

◦ 전라북도 및 익산청 협의(2차)                      : 2017. 01. ~ 06

□ 하반기 추진계획

◦ 건설기술심의 및 총사업비 협의                   : 2017. 07. ~ 09.

◦ 주민설명회(2차)                                  : 2017. 08 ~ 09.

◦ 지방하천심의위원회 심의                         : 2017. 10 ~ 11..

◦ 용역 준공 및 공사 발주                          : 2017. 12.

◦ 공사 추진                                  : 2018. 03. ~ 2019. 12

6		동면천 하천정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 왕궁면 동촌리 ~ 왕궁면 평장리(부상천 합류점)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2019

◦ 사 업 비 : 15,480백만원(국비 7,740 도비 3,096, 시비 4,644)

◦ 사업내용 : 하천정비 L=3.05km

▸ 제방축조 및 보축, 교량 재가설 등

□ 상반기 추진실적

◦ 동면천 하천기본계획수립 (2012-293호)            : 2012. 11. 09.

◦ 국비확정 통보(교부결정 4억원)                   : 2017. 03.

◦ 전북도 원가심사 심의                            : 2017. 03.

◦ 실시설계 용역 발주                              : 2017. 04.

□ 하반기 추진계획

◦ 실시설계 용역 시행                      : 2017. 06. ~ 2018. 05.

◦ 총사업비협의 및 기술심의                : 2018. 04. ~ 06.

◦ 공사 발주                               : 2018. 07.

◦ 공사 추진                               : 2018. 08. ~ 2019. 12

7		소하천 정비사업(오동정천, 대판천)

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 망성면 어량리(오동정천), 삼기면 연동리 (대판천)

◦ 사업기간 : 2015. ~ 2018.

◦ 사 업 비 : 5,200백만원(국비 2,600  시비 2,360  기타 160)

◦ 사업내용 : 소하천정비 2개 하천 L=1.36km정비

사업명	사 업 량	사업비(백만원)	사업기간
합 계		5,200
오동정천	소하천정비 L=0.74km	3,600	2015. 1 ~ 2017. 12
대판천	소하천정비 L=1.2km	1,600	2017. 1 ~ 2018. 12

□ 상반기 추진실적

◦ 오동정천 소하천정비공사 1, 2차분 추진	: 2015. ~ 2016. 12.

◦ 오동정천 소하천정비공사 3차분 착공	: 2017. 02.

▸ 공정율 : 95%

◦ 대판천 실시설계 용역 진행중(70%)	: 2017. 02. ~ 06.

□ 하반기 추진계획

◦ 오동정천 소하천정비공사 3차분 준공	: 2017. 08

◦ 대판천 실시설계 용역 준공	: 2017. 08

◦ 대판천 감정평가 및 토지 보상	: 2017. 08 ~ 12.

◦ 대판천 공사 추진	: 2017. 09 ~ 2018. 12

8		만경강 물문화관 조성사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 목천동 1183-23번지 외 12필지

◦ 사업기간 : 2015 ~ 2019

◦ 사 업 비 : 113억원(국비100억, 시비13억)

◦ 사업개요 : 11,７１９㎡(지하 1층 지상2층)/연면적 1,478㎡)

◦ 시설 현황

▸다목적실，로비，사무실，카페테리아，생태전시 및 홍보관　등

◦ 사업시행자 : 익산지방국토관리청(만경강신탁지구하천정비사업에 포함)

□ 상반기　추진실적

◦ 물문화관　조성에　따른　MOU　체결　　　　　　：2017.４.７.

▸익산시，김제시，익산지방국토관리청

□ 하반기　추진계획

◦ 실시설계 및 도시관리계획결정（변경）용역　추진	: ~2017.９.

◦ 감정 평가 및 용지 보상 실시(익산시)	: 2017.９~ 12.

◦ 공사 추진(익산지방국토관리청)	: 2017. 12. ~ 2019. 12.

9		도로조명 조도개선

□ 사 업 개 요

◦ 사업위치 : 익산시 일원

◦ 사업기간 : 2017. 01 ~ 12

◦ 사업예산 : 865백만원

◦ 사업내용 : 우범지역 및 야간통행불편지역 도로조명 보수 및 설치

▸ 사업내역

구 분	세부사업	사 업 개 요	예산 (백만원)	비 고
합 계		10개 사업	865
보 안 등 신규설치	생활환경개선사업	보안등신규설치 268개소	299
	영등2동외 2개동 LED가로등교체공사	LED가로등교체 29개소	39
노 후 가로등정비	도심지역 가로등 유지보수	고장가로등 정비 90개소	90
	산업단지 가로등 유지보수	가로등보수 50개소	50
	가로등 노후점멸기 교체공사	노후점멸기교체 5개소	22
	읍면지역 보안등 보수	읍면지역고장보안등수리	49
	노후 보안등기구 교체	노후 보안등기구 교체	30
	가로등관리번호표찰설치	가로등관리번호표찰부착	86
	익산대로 가로등 LED교체공사	가로등LED교체 90개소	100
	원대사거리~공설운동장앞 가로등LED교체공사	가로등LED교체 90개소	100

□ 상반기 추진실적 ---------- 6개사업완료(340백만원)

◦ 보안등 신규설치공사 외 1개사업  ------------------- 143백만원

◦ 도심지역 가로등 유지보수(1차)외 3개사업 ------------ 197백만원

□ 하반기 추진계획

◦ 마동외 15개 읍면동 보안등 설치공사 추진          : 2017.07 ~ 11.

◦ 도심지역 가로등 유지보수(2차) 외 4개사업 추진     : 2017.07 ~ 12.