도로공원과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2017 예산집행실적
□	2017 상반기 성과 및 반성
□	2017 주요업무추진상황

도로공원과 비전 및 중점추진방향

	목 표
안전하고 쾌적한 도로환경 조성 및 자연과 사람이 어우러진 푸른익산 조성

		전 략 목 표
◦ ◦	도로의 유지 및 관리철저로 안전한 시민생활 영위 자연친화적 녹색도시 조성

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦ ◦	효율적인 도로,시설물 유지보수 및 관리체계 운영 시민에게 감동을 줄 수 있는 주민숙원사업 추진 불법광고물․노점상․노상적치물 정비로 쾌적한 가로환경 조성 푸른숲과 꽃이 어우러진 아름다운 도시미관조성 시민이 찾고싶은 도시근린공원 확충 및 지속관리

일   반   현   황

□ 기        구

						도로공원과
도로행정			도로관리			도로기반			가로정비			푸른숲조성			공원조성			공원관리

□ 정  ․  현  원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	38		1	8	8	11	10
현 원	37		1	10	14	7	5
증 감	△1		0	2	6	△4	△5

※ 무기계약 : 25 ( 도로관리 17 / 가로정비 6 / 도로행정 1 / 푸른숲조성 1 )

□ 사  무  분  장

◦ 도로행정 : 국․공유재산(도로)관리, 운행제한차량 허가 및 단속, 도로굴착심의, 도로점용 허가 및 신고, 도로점용료 부과 및 징수

◦ 도로관리 : 도로정비 및 유지보수, 교량·지하차도 유지관리, 도로 표지판 설치및

유지관리,도로 생활민원처리, 도로방재대책 및 제설작업

◦ 도로기반  :  주민숙원사업, 비법정도로 확포장공사, 교통혼잡구간 개선사업,

교통사고 잦은 곳 개선사업, 마을안길 노후도로 포장공사

◦ 가로정비 : 옥외광고물 표시 허가 및 사후관리, 불법 광고물 지도 단속 및 관리

노점상 및 노상적치물 지도 단속 관리

◦ 푸른숲조성 : 도시숲조성,가로수 및 화단조성, 학교공원화, 꽃길조성

◦ 공원조성 :  공원조성계획 수립 및 시행, 공원조성 및 재정비사업,

공원리모델링 사업

◦ 공원관리 :  공원시설물 설치 및 유지관리, 공원 수목식재 및 유지관리

□  도 로 현 황

(단위 : 개소/km)

구 분	총 연 장		포 장		미 포 장		포장율 (%)
	노선	연장	노선	연장	노선	연장
합 계	1,557	1,440.1	1,244	917.8	313	522.3	63.7
고속도로	1	17.3	1	17.3			100
일반국도	5	77.6	5	77.6			100
지 방 도	12	163.1	10	143.9	2	19.2	88.2
시 도	1,264	460.5	1,096	368.2	168	92.3	80
군 도	23	199.6	13	113.9	10	85.7	57
농어촌도	252	522	119	196.9	133	325.1	37.7

□  교량 ․ 육교 ․ 지하차도 현황

(단위 : 개소)

관리청	계	고속 도로	국도	지방도	시군도	농어 촌도	육교 (지하보도)	지하 차도
계	166	9	31	19	37	55	10(1)	5
도로공사	9	9	-	-	-	-	-	-
국도유지	20	-	20	-	-	-	-	-
도로관리사업소	19	-	-	19	-	-	-	-
익 산 시	118	-	11	-	37	55	10(1)	5

□ 장 비 현 황

(단위 : 대)

구분	굴삭기	덤프	화물차	살포기	다짐기	제설기
38	3	4	11	10	3	7

□ 주요자재 보유현황

(단위 : 톤/㎥/㎡/개)

염화칼슘	모래	소금	보도블럭	경계석
320톤	300㎥	630톤	2,200㎡	950개

□ 지정 게시대 및 벽보판 현황

(단위 : 개소/면수)

합 계		현수막 게시대			벽보판	비 고
개 소	면 수	소 계	상업용	행정
212	350	143/213	100/170	43/43	69/137

□  위원회 현황

(단위 : 명)

위 원 회 명	위 원 장	위 원 수			비 고
		계	당연직	위촉직
도로관리 심의위원회	부 시 장	20	10	10
옥외광고심의위원회	건설교통국장	9	3	6
가로수위원회	건설교통국장	5	1	4

□ 공원 지정 현황

구 분	개 소	면적(㎡)	조성(㎡)	조성률	비고
계	95	5,553,457	2,559,571	46.0%
근린공원	45	4,923,420	1,992,951	40.5%
어린이공원	38	87,906	70,697	80.4%
기타공원	12	542,131	495,923	91.5%

□ 녹지 현황

구 분	개 소	면적(ha)	조성(ha)	조성률	비고
계	76	89	37	41.6%
완충녹지	63	83	30	36.1%
경관녹지	12	5.6	4	71.4%
연결녹지	1	0.4	0	0%

□ 가로수 현황

구 분	구 간	노선길이(㎞)	본 수(본)	비 율(%)	비 고
계	120	359	44,390	100	관목 (142,160)
시내구간	98	245	30,795	70
시외구간	22	114	13,595	30

※ 왕벚(32%), 이팝(15%), 은행(15%), 배롱(12%), 메타(9%), 기타(17%)

□ 도시숲 현황

구 분	개 소	면 적(㎡)	비 고
계	44	76,900
쌈지공원	23	55,970
교통섬	21	20,930

2017 예산집행 실적

【 2017. 6. 15 . 현재】                                (단위 : 천원)

부서	정책	단위		세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
도 로 공 원 과					24,856,212	9,357,011	15,499,201	37.6
	도로환경개선				8,672,046	3,782,998	4,889,048	43.6
		포장도로유지관리			7,288,821	3,196,071	4,092,750	43.8
				시내일원아스콘 소파보수	301,000	292,890	8,110	97.3
				도로보수폐기물처리	35,000	28,967	6,033	82.7
				읍면동도로붕괴보수	122,000	72,000	50,000	59
				포장도로유지관리	1,251,735	325,891	925,844	26
				인도보수및정비	1,074,826	540,375	534,451	50.2
				건설장비 및 차량 유지관리	380,260	309,250	71,010	81.3
				시내노후도로 덧씌우기	2,004,000	1,597,163	406,837	79.6
				생활민원현장처리	100,000	9,634	90,366	9.6
				기타지역특성화산업육성 (탄소융복합제품공공구매지원시범사업)	20,000	19,901	99	99.5	도비
				전국체전경기장진입로정비	2,000,000	0	2,000,000	0	도비 (추경)
		시설물유지관리			1,136,791	452,962	683,829	39.8
			지하차도 및 지하보도 육교 등 유지관리		177,200	113,882	63,318	64
			교량유지관리		591,721	146,401	445,320	24.7
			도로표지판보수 및 정비		28,000	6,991	21,009	24.9
			도로시설물 보수 및 정비		201,000	71,421	129,579	35,5
			도로교통량조사 및현황조사		21,870	3,145	18,725	14.3
			도로관리상황실 유지관리		11,000	5,930	5,070	53,9
			교량안전점검		106,000	105,192	808	99.2	도비50%

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
		불법광고물정비		246,434	133,965	112,469	54.3
			불법광고물 방지시설 설치 및 유지관리	47,974	18,848	29,126	39.2
			행정게시대관리	159,500	84,823	74,677	53.1
			노점상정비	38,960	30,294	8,666	77.7
	도로기반관리			5,874,916	2,439,350	3,435,566	41.5
		소규모주민숙원사업		5,316,101	2,138,875	3,177,226	40.2
			소규모 주민숙원사업	1,221,280	716,112	505,168	58.6
			주민편익증사업(보조)	153,591	93,614	59,977	60.9
			마을안길 노후도로 정비공사	2,844,417	946,704	1,897,713	33.2
			읍면동 마을도로시설 개선사업	500,000	366,354	133,646	73.2
			숭모공원~석치마을간 도로확포장공사	596,813	16,091	580,722	2.6	토지수용 및 공사 착공중
		위험도로개선		438,521	195,971	242,550	44.6
			교통사고잦은곳 개선사업	118,521	88,354	30,167	74.5
			교통사고잦은곳 개선사업(보조)	320,000	107,617	212,383	33.6
		안전한보행환경조성사업		120,000	104,504	15,496	87
			보행안전및편의증진기본계획수립	120,000	104,504	15,496	87
		재무활동(도로공원과)		294	0	294	0
		보 전 지 출		294	0	294	0
			보전지출	294	0	294	0
	행정운영경비			1158,414	490,854	667,560	42.3
		인력운영비		1,113,708	473,754	639,954	42.5
			인력운영비	1,113,708	473,754	639,954	42.5
		기본경비		44,706	17,100	27,606	38.2
			기본경비	44,706	17,100	27,606	38.2

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
	녹색환경도시조성			9,150,836	2,643,809	6,507,027	28.8
		도시림등조성		3,946,072	1,360,787	2,585,285	34.4
			가로수조성	300,000	289,879	10,121	96.6
			가로수유지관리	382,527	124,810	257,717	32.6
			수목양묘장조성및관리	24,834	3,415	21,419	13.7
			가로화단조성및관리	308,792	30,769	278,023	9.9
			꽃양묘장관리및꽃조성	260,639	134,629	126,010	51.6
			중앙분리대수목관리	93,028	18,361	74,667	19.7
			도시숲유지관리	494,304	64,726	429,578	13
			산림서비스도우미 운영지원	32,219	20,398	11,821	63.3
			학교공원화 및 담장 없애기사업	114,700	61,645	53,055	53.7
			도로변병해충	84,022	29,203	54,819	34.7
			생활권수목진료지원	5,000	4,750	250	95
			명상숲조성	120,000	106,213	13,787	88.5
			무궁화동산조성･관리	100,000	93,590	6,410	93.5
			녹색일자리확충	14,365	5,442	8,923	37.8
			꽃향기가득한품격있는익산만들기	1,611,642	372,957	1,238,685	23.1
		공원계획및조성		3,690,929	908,278	2,782,651	24.6
			다기능힐링공원조성	860,000	28,636	831,364	3.3	공원시설결정및발주준비중
			공원리모델링	301,472	124,866	176,606	41.4
			명품가로숲길조성	396,000	19,403	376,597	4.8	공원시설결정및발주준비중
			소라산공원조성사업	860,199	152,522	707,677	17.7	사업시행 절차이행중
			북부권농촌형주민힐링공원조성사업	465,258	463,560	1,698	99
			남부권나눔숲조성사업	425,800	12,336	413,464	2.8	공원조성계획 행정절차이행중

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
			공원조성계획	4,000	3,483	517	87
			황등공원조성사업	100,000	92,339	7,661	92.3
			전라선폐선부지 공원조성사업	29,000	0	29,000	0	폐선부지 사용료
			공공시설여성화장실확충사업	179,200	11,133	168,067	6.2	실시설계중
			웅포갓점마을쌈지공원조성	70,000	0	70,000	0	추경
		근린공원녹지관리		1,513,835	374,744	1,139,091	24.7
			공원녹지시설 유지관리	977,283	253,604	723,679	25.9
			공원녹지수목 유지관리	536,552	121,140	415,412	22.5

2017년 상반기 성과 및 반성

□ 성     과

◦ 안전한 도로 유지 관리

▸ 시내노후도로 정비 A=127,250㎡, 주요도로인도정비 A=8,500㎡

▸ 도로시설물 및 표지판 정비 60개소

▸  주요도로 제초작업 : 주요도로 L= 48km

◦ 도로 및 교량 안전을 위한 과적  ․ 제한차량 계도 및 단속

▸ 과적차량검차 : 2,870대/21건 적발, 과태료 7,565천원 부과

▸ 교량유지관리 : 정밀점검 5개소, 교량보수 2개소

◦ 신속한 생활민원 처리로 주민생활 편익 기여

▸ 소규모 주민숙원사업 (마을안길정비 등)   :  137건 처리

▸ 소파보수 등 생활민원 처리                : 869건 처리

(견문보고 350건 / 생활민원 265건 / 자체정비 254)

▸ 불법 광고물 등 정비      : 30,349건 (명예감시원 합동단속 6회 )

▸ 불법 노점상 및 노상적치물 계도·단속	: 7,171건 처리

◦ 도시숲 조성 및 관리로 쾌적한 녹색도시 미관개선

▸ 가로수 식재 5km, 명상숲 조성 2개소, 무궁화동산 조성 1개소

▸ 자연친화적 감성꽃거리 조성 : 팬지등 257천본 식재

□ 반     성

◦ 동시다발적 민원에 대한 신속응대 미흡

◦ 도시가로변 위법행위(현수막, 적치물 등)즉각대처 미흡

2017 주요업무 추진상황

	□	도로관련 허가 및 관리
	□	포장도로유지관리사업
	□	교량및시설물유지관리
	□	생활여건개선을 위한 주민숙원사업
	□	가로환경 정비사업 추진
	□	가로수 조성 및 관리
	□	꽃향기 가득한 품격있는 익산만들기
	□	전라선 폐선부지 공원화 사업
	□	도시공원 녹지관리

1		도로관련 허가 및 관리

□ 사 업 개 요

◦도로점용(굴착) 허가 -----------------------------------------------약 700여건 / 연

▸이중굴착 방지를 위한 도로관리심의회 운영(연 4~5회)

◦국·공유재산 자료 DB구축 및 도로재산관리 ------- 44천 필지(국 20천/공 24천)

▸도로재산 실태조사 및 권리보전조치, 사용수익허가 및 용도폐지

◦과적제한차량 단속 및 계도 -----------------------------연중(검차계획 6,300대)

▸평화육교 과적단속 초소 외 단속지점 지정운영 : 47개소

□ 상반기 추진실적

◦ 도로관리심의회 운영(8개기관, 89개소, 28km) : 2회

▸지하매설물 관리기관 협의 : 수시(가스, 전기, 통신, 상하수도, 교통 등)

◦ 국공유재산 실태조사를 통한 용도폐지 및 사용수익허가 : 40건

▸국유재산 권리보전 조치 : 52필지(공고 중)

◦ 과적제한차량 합동단속 및 불시단속 추진(1개반 9명)

▸검차 2,870대, 합동단속 3회, 단속 21대(과태료 부과)

□ 하반기 추진계획

◦ 도로관리심의회 운영(3회) 및 도로점용허가

◦ 국·공유재산 실태조사를 통한 용도폐지 및 사용수익허가

◦ 과적제한차량 합동단속 및 불시 야간단속 추진

2		포장도로 유지관리 사업

□ 사 업 개 요

◦ 도로현황 :  1,243개 노선, L=900km

▸국도:78km 지방도:144km 시도:368km 군도,농어촌:310km

◦ 사업기간 :  2017. 01. ~ 12.

◦ 사 업 비 :  5,720백만원(시비3,720, 도비 2,000)

▸본예산 : 3,080백만원(시비), 1회추경 : 2,640백만원(도2,000, 시640)

□ 사 업 내 용

◦ 노후포장도로 유지관리 ----------- 4,290백만원(시2,790, 도1,500)

▸체전대비 주요도로 재포장 : 12개 노선 L=35km / 3,500백만원

▸파손도로 소파보수 및 재포장  :  20개 노선  L=9.0km /  790백만원

◦인도보수및정비 --------------------- 1,210백만원(시710, 도500)

▸2018 체전대비 인도정비  :  7개 노선 L=12km  / 710백만원

▸민원발생 및 기존보도 유지관리  :  20개 노선 L=6km /   500백만원

◦ 교통흐름개선지역 구조개선(어양동, 황등면)  ----------------  220백만원(시비)

□ 상반기 추진실적

◦ 노후포장도로 유지관리 사업 추진 ------------------------- 2,450백만원

▸체전대비 주요도로 재포장      :   6개 노선 L=20km  /  2,000백만원

▸파손도로 소파보수 및 재포장  :  20개 노선 L=6km  /    450백만원

◦ 인도보수 및 정비사업 추진 -----------------------------------  410백만원

▸체전대비 인도정비     :    3개 노선  L=3km  /   210백만원

▸민원발생 및 기존보도 유지관리  :  10개 노선 L=4km /   200백만원

◦ 교통흐름개선지역 구조개선사업  실시설계 용역 : 2017. 2. ~ 6.

□ 하반기 추진계획

◦ 추경편성사업 추진

▸체전대비 노후도로 및 인도정비사업 추진(2,000백만원)---2017. 6. ~ 10월

▸파손도로 소파보수 및 재포장(340백만원) ------------------ 2017. 6. ~ 10월

▸보도유지관리 및 시설(300백만원) -------------------- 2017. 6. ~ 11월

◦ 교통흐름개선지역 구조개선사업 추진 -------------------------- 2017. 7. ~ 11월

3		교량 및 시설물 유지관리

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 :  교량 및 시설물 105개소 및 도로 부속시설물

◦ 사업기간 :  2017.  01. ~ 12.

◦ 사 업 비 :  879백만원(도비 53, 시비 826)

▸본예산 :  562백만원,  1회 추경 : 317백만원

□ 사 업 내 용

◦교량유지관리-----------------------------------------------  651백만원

▸시특법 대상시설물 정밀점검     :      7개소  / 194백만원

(송학교, 용동과선교, 와리교, 평화육교, 송학육교, 모현대교, 석방육교)

▸교량 유지관리 및 보수    :      1 식   /  357백만원

▸팔봉육교 비가림 시설     :      1 개소  / 100백만원

◦도로 부속시설물 보수 및 정비   ---------------------------------  228백만원

▸도로 부속시설물 유지보수     :       1식  /   100백만원

▸보행자용 방호울타리 설치     :      250m  /  100백만원

▸도로표지판 보수 및 정비	:       1식  /     28백만원

□ 상반기 추진실적

◦시특법 대상시설물 정밀점검 (5개소/135백만원) : 2017. 2 ~ 6

▸송학교, 용동과선교, 와리교, 송학육교, 석방육교

◦교량유지보수 (2개소/ 76백만원)               : 2017. 3 ~ 5

▸모현대교 신축이음, 평화육교 상판보수

◦도로 부속시설물 보수 및 정비(3개 사업 / 72백만원)   : 2017. 1 ~ 6

▸도로 부속시설물, 보행자방호울타리, 표지판정비

□ 하반기 추진계획

◦시특법 대상시설물 정밀점검(모현대교외 1개소) ---- 2017. 7 ~ 12

◦교량신축이음보수(모현교외 1개소/127백만원)------- 2017. 7 ~ 12

◦팔봉육교 비가림, 육교보수 및 도로시설물 유지 --- 2017. 6 ~ 12

4		생활여건개선을 위한 주민숙원사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2017. 01 ∼ 10

◦ 사업대상 :  219건(5,263,680천원)-1회추경포함

‣소규모주민숙원사업(함열읍 마을진입로 덧씌우기공사 외 58건) – 1,137,075천원

‣마을안길노후도로정비(함열읍 상지원마을 안길정비공사 외 104건) – 2,646,605천원

‣민생안정을 위한 마을도로 생활여건개선(50개소) – 500,000천원

‣숭모공원 ∼ 석치마을 도로 확․포장 공사 – 500,000천원

‣교통사고 잦은곳 개선사업(모현사거리, 신기교차로, 황등중로) –360,000천원

‣보행안전 및 편의증진 기본계획용역 수립 – 120,000천원

□ 상반기 추진실적

◦ 전체 추진대상 : 219건 중(추경확보사업 79건 포함)

‣공 사 완 료 : 71건(소규모 36건, 마을안길 16건, 생활여건개선 18건, 기타 1건)

‣공   사  중 : 13건(소규모 4건, 마을안길 6건, 생활여건개선 1건, 기타 2건)

‣설   계  중 : 26건(소규모 4건, 마을안길 20건, 기타 2건)

‣미   발  주 : 109건(소규모 15건, 마을안길 63건, 생활여건개선 31건)

※기  타 : 5건

- 숭모공원~석치마을 도로 확·포장공사(공사중),

- 보행안전 및 편의증진 기본계획용역(용역중),

- 교통사고 잦은곳 개선사업(모현사거리 : 공사완료, 황등 중로 및 신기교차로 :설계중)

□ 하반기 추진계획

◦ 잔여사업 및 1회추경확보사업 설계 및 발주     : 2017. 06. ~ 08.

※1회추경확보사업 : 79건, 금1,896,605천원

◦ 생활여건개선을 위한 주민숙원사업 완료        : 2017. 10.

5		가로환경 정비사업 추진

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 위 치 : 익산시 전역

◦ 사 업 기 간 : 2017. 01. ~ 12.

◦ 사 업 내 용

▸ 노점상 및 노상적치물 지도 단속 및 계도

▸ 불법유동광고물 정비 및 지도 단속

□ 상반기 추진실적

◦ 불법광고물 근절을 위한 게시대 확충 : 24개소 26면(연립11,저단15면)

◦ 불법 유동광고물 정비 및 단속 : 30,349건(과태료10건 / 12백만원)

◦ 노점상 및 노상적치물 등 수시 단속 및 계도 : 7,171건

□ 문제점 및 대책

◦ 생계형 영세노점상에 대하여 계도 및 자진철거 유도하고 있으나 상대적인  민원이 발생하고 있어 형평성 등 현실여건에 맞게 단속실시

◦ 공공기관의 불법광고물(현수막 등) 게재행위가 증가추세이나 행정

게시대 확충은 물론 공문발송 등 인식제고를 통하여 불법광고물 난립 억제

□ 하반기 추진계획

◦ 광고물단속반(2개반8명)편성을 통한 지속적 단속 및 계도(관내일원)

▸ 행정조치 불이행 업체 : 과태료 및 이행강제금 부과

▸ 불법광고물 및 유동광고물 정비 야간단속 : 월1회

◦ 주요간선도로변 노점 등 지속적 단속 및 계도

▸ 각종 축제(국화·서동축제 등) 및 행사 지원

▸ 여산 부사관학교 임관식 노점 지도 단속

6		가로수 조성 및 관리

□ 사 업 개 요

◦ 위    치

▸ 가로수 조성	: 711지방도 외 1개노선 5km

▸ 가로수 유지관리	: 하나로 등 120개 노선 359km

◦ 사 업 비 : 720백만원(지특 150, 시비 570)

▸ 가로수 조성	: 300백만원(지특 150, 시비 150)

▸ 가로수 유지관리	: 420백만원(시비)

□ 상반기 추진실적

◦ 가로수 조성사업

▸ 가로수 조성사업 완료	: 2017. 3. ~ 4.

- 711지방도(함라교차로~신목교차로, L=4.5km, 이팝나무 372주 식재)

- 선화로(중앙체육공원사거리~익산문화원, L=0.5km, 배롱나무 21주, 관목 1,650주 식재)

◦ 가로수 유지관리	: 2017. 3. ~ 6.

▸ 가로수 수형조절 및 병해충 방제 등

- 교통섬 및 부송동 2공단 도로변 등 15개소 수목 전지

- 웅포면 벚꽃터널 왕벚나무 정비 및 보식사업(왕벚 25주 보식 등)

- 주요도로변 가로수 전지 등 민원처리 및 병해충 방제

□ 하반기 추진계획

◦ 가로수 유지관리 지속 추진	: 2017.  7. ~ 12.

▸ 가로수 수형조절, 부정아 제거, 지주목 정비, 병해충 방제 등

◦ 가로수 보식사업 추진	: 2017. 10. ~ 11.

7		꽃향기 가득한 품격있는 익산만들기

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2017. 1. 〜 12.

◦ 사 업 비 : 1,611백만원

◦ 사업내용

▸ 시민과 함께하는 꽃향기 가득한 익산 만들기 추진(215개 기관단체 20만본)

▸ 특화거리 및 꽃길조성, 각종 축제지원(무왕로외 3개노선 17.5km)

▸ 계절별 꽃 생산 및 식재(양묘장 자체생산:초화류 연간 65만본)

□ 상반기 추진실적

◦ 시민과 함께하는 꽃향기 가득한 익산 만들기 추진    : 2017.  3. ~  4.

▸ 대    상 : 215개 기관 및 단체

▸ 수   량 : 초화류 46,400본, 화분 1,833개(걸이화분 1,242, 사각화분 591)

◦ 특화거리 및 꽃길 조성                             : 2017.  3. ~  5.

▸ 위   치 : 구경찰서 사거리~익산역, 모현대교, 남북로, 익산시청 주변(7.5km)

▸ 내    용 : 간이화단, 대형화분, 꽃걸이 설치 등 꽃길조성

◦ 계절별 꽃 생산 및 식재                           : 2017.  1. ~  5.

▸ 수    량 : 팬지 등 5종 257,000본 양묘 및 식재

- 봄꽃(튤립, 팬지, 비올라, 페츄니아, 메리골드)

▸ 내    용 : 주요도로변 및 교통섬 꽃식재 및 꽃길조성, 초화류 지원

□ 하반기 추진계획

◦시민과 함께하는 꽃향기 가득한 익산 만들기 추진(2회 7월/10월)

▸ 대    상 : 익산시 관내 기관 및 단체 등

▸ 수    량 : 초화류 16만본, 화분 1,000개(7월 8만본, 10월 8만본)

▸ 내    용 : 초화류를 지원하여 시민정서 함양 및 아름다운 경관조성

◦특화거리 및 꽃길 조성                               : 2017.  7. ~  11.

▸ 위    치 : 무왕로외 4개노선 10km

▸ 내    용 : 간이화단, 대형화분, 꽃걸이 설치 등 꽃길조성

◦ 꽃 양묘장 신설                                   : 2017.  7. ~  10.

▸위    치 : 목천동 1183-24 일원, 덕기동 산 202-2 일원

▸내    용 : 꽃 생산 연동 하우스(2개소) 착공 및 준공

(연간 30만본 추가생산양묘)

8		전라선 폐선부지 공원화 사업

□ 사 업 개 요

◦ 위치(규모) : 구)동익산역~춘포역(폐역사부지 16,000㎡·폐선부지 L=4.8㎞)

◦ 사업내용 : 나눔숲, 힐링공원, 들녘숲길 조성

▸1단계 - 남부권 나눔숲 조성사업(폐역사 부지 6,000㎡)     : 2016. ~ 2017.

▸2단계 - 다기능 힐링공원 조성사업(폐역사 부지 10,000㎡)  : 2017. ~ 2018.

▸3단계 - 명품 들녘숲길 조성사업(폐선부지 L=4.8㎞)        : 2017. ~ 2018.

◦ 총사업비 : 2,891백만원(국비 628 시비 1,963 기금 300)

▸16년 -  635백만원(시비 335 기금 300) : 공원구역결정 용역, 나눔숲조성

▸17년 - 1,256백만원(국비 628 시비 628) : 힐링공원, 들녘숲길 조성

▸18년 - 1,000백만원(시비 1,000)         : 힐링공원, 들녘숲길 조성

□ 상반기 추진실적

◦ 공원구역결정용역 의회 의견 청취 및 도시계획위원회 자문(원안 가결)

: 2017. 1. ~ 3.

◦ 힐링공원 및 들녘숲길 설계용역 발주               : 2017. 3.

◦ 남부권 나눔숲 공사 발주                          : 2017. 5.

□ 하반기 추진계획

◦ 공원구역결정 및 조성계획 수립 용역 준공          : 2017. 7.

◦ 힐링공원 및 들녘숲길 설계 용역 준공 및 공사 발주 : 2017. 9.

◦ 남부권 나눔숲 공사 준공 : 2017. 12.

9		도시공원 및 녹지 관리

□ 사 업 개 요

◦ 대    상 : 공원 70개소 274㏊, 녹지 47개소 34㏊

◦ 사업내용 : 안전하고 편하게 이용할 수 있는 공원시설 및 수목 관리

◦ 사 업 비 : 1,443백만원(시설관리 907, 수목관리 536)

◦ 사업기간 : 2017. 1. ~ 12.(연중)

□ 상반기 추진실적

◦ 기간제 근로자 선발 : 공원청소(7명), 수목관리(27명), 시설수리(1명)

◦ 공원이용 불편사항에 대한 민원처리 및 시설물 보수 추진  : 146건

◦ 공원내 시설물 및 운동시설물 교체 추진                  :  12건

◦ 미세먼지 저감을 위한 친수공간(바닥분수,실개천등) 운영 : 모현공원 7개소

◦ 2017년도 어린이 놀이시설 안전점검 완료	: 어양공원외 25개소

◦ 공원내 시설물(전기) 정비 및 시설개선 공사 추진  : 모현공원외 37개소

◦ 병해충방제 182ha, 예취 및 풀메기 243ha, 전지등 수목관리 48개소

□ 하반기 추진계획

◦ 공원내 주민 편의시설 보강 및 노후·파손 시설물 유지관리     : 연중

▸ 화장실(전기), 정자, 벤치 및 운동시설 보수 및 추가 설치

◦ 공원 및 녹지내 건강한 생육을 위한 수목의 유지관리          : 연중

▸ 가지치기, 병해충 방제, 예취, 풀메기, 지주목정비 등

◦ 주민과의 대화 건의사항등(시설 개선공사 등 8건) 추진 : 1회 추경 확정