상수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2017 예산집행실적
□	2017 상반기 성과
□	2017 주요업무 추진상황

비전 및 중점추진방향

	비 전
안전하고 깨끗한 수돗물의 안정적 공급

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	보다 안전하고 깨끗한 생활용수 공급 방안 강구 자체 수돗물 목표 수질기준 설정운영 유수율 향상을 통한 공기업 경영 효율성 제고

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	정수시설 효율적 운영관리 및 상수원 수질관리 강화 상수관망 최적 관리 시스템 구축 수돗물 수질검사 등 시민참여 프로그램 운영

일  반  현  황

□ 기          구

											상수도과
상 수 행 정				정 수 생 산						급 수 시 설					요 금				누 수 방 지						수 질 실 험

□ 정  ․  현  원

(단위 : 명)

구 분	계	직 급 별							비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구
정 원	43	1	1	9	13	11	6	2
현 원	42	1	1	9	24	2	3	2
증 감	△1				11	△9	△3

□ 사  무  분  장

◦	상수행정	:	상수도종합계획수립, 예산편성 및 결산, 입찰 및 계약, 공유재산관리
◦	정수생산	:	정수생산기획조정, 정수장시설물관리, 배수지관리
◦	급수시설	:	상수도정비기본계획수립, 급․배수공사설계 및 감독, 공동주택저수조 청소, 간이상수도 및 소규모급수시설관리, 개인급수공사
◦	요 금	:	급수사용료조정, 수입예산정리 및 정산, 계량기교체, 체납요금징수
◦	누수방지	:	누수방지 및 누수탐사기획, 노후관개량공사 및 감독, 누수탐사, 누수처보수, 상수도관망도 정리, 변류수리 및 교체
◦	수질실험	:	수도수질실험 기획, 상수원수질검사, 정수약품 구입관리, 상수원 보호구역관리, 수도꼭지 수질검사

□ 수돗물평가위원회 현황

(단위 : 명)

구 성	위 원				임 기	비 고
	공무원	시의원	교수	시민단체
10	2	1	2	5	2 년	남 5, 여 6 (2017. 6.30만기)

※ 근 거 : 수도법 제30조의1,  익산시 상수도급수조례 제48조

□ 상수도 급수인구 현황

(단위 : 명)

구 분	총인구	급수인구	보급율 (%)	비 고
계	300,966	297,746	98.9
도심권	237,276	236,944	99.9
읍면권	63,690	60,802	95.4

□ 상수도 급수시설 현황

(단위 : ㎥/일)

구 분		시설용량	급 수 량	비 고
계		230,300	146,383
생 활 용 수	소 계	195,300	124,405	100%
	광 역	105,300	55,312	44%
	자 체	90,000	69,093	56%
공 업 용 수	자 체	35,000	21,978

□ 상수도 사용 현황

(단위 : 전, ㎥)

구 분 업 종	급수전수	월평균 사용량	비율(%)	비 고
계	61,428	3,107,362	100.0
가 정 용	47,433	1,533,886	49.4
일 반 용	13,271	552,568	17.8
산 업 용	592	326,164	10.5
대중탕용	42	23,219	0.7
전용공업용	90	671,525	21.6

□ 상수도 관로 현황

(단위 : ㎞)

계	도수관	송수관	배수관	급수관	비고
1,878.9	2.5	25.3	1,170.5	680.6

□ 상수도 시설 현황

시 설 명	개 소	시설용량	비 고
정 수 장	2	125,000㎥/일	신흥, 금강
배 수 지	5	55,500㎥	신흥, 금강, 금마, 팔봉, 삼기
가 압 장	2	48,600㎥/일	금마, 삼기
보조수원지	1	1,053,000㎥	신흥

2017 예산집행실적

【 2017. 6. 15. 현재 】                                       (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
상수도과				37,407,966	12,669,429	24,738,537	33.9
	상수도사업비용			24,566,614	9,027,272	15,539,342	36.7
		영업비용		22,836,409	9,027,272	13,809,137	39.5
			원수 및 취수비	12,663,403	4,901,706	7,761,697	38.7
			정수비	2,634,333	1,139,503	1,494,830	43.3
			배·급수비	148,377	59,356	89,021	40.0
			급·배수공사비	1,101,331	434,779	666,552	39.5
			일반관리비	4,785,675	1,953,430	2,832,245	40.8
			징수 및 수용가관리비	1,503,290	538,498	964,792	35.8
		예비비		1,730,205	-	1,730,205	-
	자본적지출			12,841,352	3,642,157	9,199,195	28.4
		유형자산취득		11,455,351	3,642,157	7,813,194	31.8
			구축물	11,211,001	3,585,465	7,625,536	32.0
			기계장치	155,000	41,686	113,314	26.9
			공기구비품	89,350	15,006	74,344	16.8
		기타자본적지출		1,033	-	1,033	-
		예비비		1,384,968	-	1,384,968	-
			예비비	1,384,968	-	1,384,968	-

2017 상반기 성과 및 반성

□ 성        과

◦ 유수율 제고사업 추진 경영개선 기반 조성

‣ 동지역 상수관망 블록구축 추진/소규모 누수처 복구 : 11개소, /315개소

‣ 제수변, 소화전 교체 및 정비공사 : 119개소

◦ 효율적 검침 및 부과·징수로 경영 효율화 제고

‣ 정확한 검침으로 투명한 부과체계 확립 : 계량기 조사원 교육 5회

‣ 상수도 체납요금 징수반 편성운영으로 징수율 제고 : 징수율 98.2%

- 고질체납자 단수 : 293건

- 압류예고 187건 158백만원 ➡ 징수 128백만원

◦ 상수도 시설개선 등을 통한 안정적 급수체계 구축

‣ 급수민원 개선공사 추진 :  68개소 3.0km

‣ 배수관 개선공사 추진 :  82개소 2.0km

◦ 상수도 생활민원 적극해소로 시민불편 최소화

‣ 동파 계량기 교체 :  59건

‣ 급수장치 수선 공사 : 1,235건

‣ 공공 상수관로 누수탐사/수용가 옥내누수 탐사 : 315건/440건

‣ 상수관 부설도로 노면정비 : 30개소 6.0km

□ 반        성

◦ 상수도 특별회계 현실화율 감소

‣ 시민부담을 고려하여 점진적 수도요금 인상으로 현실화 추진

‣ 년도별 현실화율 현황(2014년 83.61%, 2015년 78.78%, 2016년 80.93%)

2017 주요업무 추진상황

		상수관망 최적화사업
		급수구역확장 및 급배수관 민원공사
		안전하고 깨끗한 수돗물 공급
		상수도요금 고액체납자 행정조치 강화
		낭산배수지 건립사업 기본 및 실시설계용역

1		상 수 도 관 망 최 적 화 사 업

ᷮ 사 업 개 요

◦ 유수율 제고사업

단 위 사 업 명	위 치	사 업 량	사업비 (백만원)	비 고
합 계			4,080
블록시스템구축	영등동, 마동, 신흥동, 부송동 일원	11개소	2,530
노후관 교체	영등동, 어양동, 신흥동 일원	2.4km	550
긴급 누수처 복구	관내 일원	800개소	800
변류 정비공사	〃	200개소	200

□ 상반기 추진실적

◦ 블록시스템 구축(SH01블록~SH11블록, 11개소)발주 ----- 2017. 1. ~ 2017. 12.

◦ 2017년 익산시 상수도 누수탐사용역 발주 ------- 2017. 1. ~ 2017. 12.

◦ 긴급 누수처 복구 공사

▸상수도관 노후로 인한 누수발생시 긴급복구(315개소) -- 발생시, 연중시행

◦ 변류 정비공사

▸노후 및 불량 변류(제수변, 소화전, 공기변 등)의 교체(119개소) -- 연중시행

□ 하반기 추진계획

◦ 블록시스템구축 11개소(SH-01~SH-11) 공사 완료 ------------ 2017. 10.

◦ 노후관교체 L=2.4km(SH-06블록) 공사 완료 ------------------- 2017. 12.

◦ 긴급 누수처 복구 및 불량변류 정비 ------------------------------ 연   중

2		급수구역 확장 및 급·배수관 민원공사

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 12.

◦ 사업내용

구 분	위치	사업량	사업비 (백만원)	비고
합 계			1,201
급수구역 확장공사	함라면 진등마을	1.4km	43
	여산면 유점마을	1.5km	92
	함열읍 학선마을	1.2km	166
상수도 부설도로 노면정비공사	익산시 일원	8.0km	500
급·배수관 민원공사	익산시 일원	7.0km	400

□ 상반기 추진실적

◦ 급수구역 확장 및 상수도 부설도로 노면정비 공사

▸ 현지조사 및 설계 ------------------------------------- 2017. 01 ~ 03

▸ 공  사  기  간  -------------------------------------  2017. 04 ~ 10

◦ 급·배수관 공사

▸ 수압저조로 인한 급수불출 민원 발생시 -------------- 연중시행

□ 하반기 추진계획

◦ 급수구역 확장 공사  및 급․배수관 민원공사 지속 추진

3		안전하고 깨끗한 수돗물 공급

□ 사업개요

◦ 원수 및 정수의 수질관리 및 검사 강화

▸ 법정검사 기준 외 검사항목 및 횟수 추가시행

◦ 정수장 시설의 안정적인 운영으로 시민에게 맑고 깨끗한 수돗물 공급

▸ 정수시설 안전점검 및 배수지, 침전지 청소 실시

□ 상반기 추진실적

◦ 상수원 수질에 따른 선택적 취수를 통해 목표 수질관리제 운영

▸ 원 수 : BOD 2mg/L이하 (수질등급 I 등급 기준)

▸ 정 수 : 탁도 0.15 NTU이하 (수질기준 0.5 NTU이하)

◦ 원․정수 수질검사 강화

구 분	법정검사 기준	수질검사 강화
원 수	월 간 : pH 등 6개 분 기 : 질산성질소 등 25개	일 일 : pH등 6개 주 간 : 대장균 등 7개 분 기 : 수은 등 31개
정 수	일 일 : pH 등 5개 주2회 : 대장균군 등 5개 월 간 : 질산성질소 등 59개	일2회 : pH 등 6개 주2회 : 일반세균 등 7개 월 간 : 수은 등 59개 분 기 : 염화비닐 등 82개

◦ 정수장 안전점검을 통한 시설물 위생적, 효율적 운영관리

▸ 정밀점검 및 내진성능평가 용역 착수(기간 : 2017. 5.25. ~ 2018.1.19.)

▸ 국가안전대진단 민·관합동실시 및 자체 안전점검 2회 실시

▸ 정수장 배수지 및 침전지 청소 각 1회 실시

□ 하반기 추진계획

◦ 수질검사 강화 및 검사 결과 홍보로 수돗물 신뢰도 제고

◦ 정수시설물의 철저한 안전점검을 실시하여 안전하고 깨끗한 수돗물 공급

4		상수도 요금 고액체납자 행정조치 강화

□ 사 업 개 요

◦ 수전현황

합 계	가정용	일반용	대중탕용	산업용	전용공업용
61,428	47,433	13,271	42	592	90

◦ 2017년 요금부과 및 징수 목표액  : 27,935백만원 / 27,655백만원(99.0%)

◦ 체납액 현황

계	2017년도	2016년도 이전
8,448건/476,521천원	6,215건/194,415천원	2,233건/282,106천원

□ 상반기 추진실적

◦ 상수도 체납요금 징수반 편성운영(2개반) ------------------- 연 중

◦ 수도계량기 조사원(50명)담당구역 수도요금 징수 책임제 시행

▸ 2회 체납 수용가 체납수도요금 안내 및 수도공급정지(단수)예고문 스티커 부착

▸ 체납 수용가 단수(단수시행 전 3회 이상 방문 및 전화 납부촉구)

◦ 상수도 사용료 상습 체납자 행정 조치 강화

▸ 30만원 이상, 3회 이상 체납자 단수 및 재산압류 : 수시

※ 기초생활수급자 등 사회적 약자에 대한 단수유예 및 납부독려

(시민불편 최소화)

□ 하반기 추진계획

◦ 위탁검침원 친절 및 직무교육 실시(월 1회 이상)

◦ 징수율 제고를 위한 체납징수반 활동 강화

5		낭산배수지 건설사업 기본 및 실시설계 용역

□ 사 업 개 요

◦ 용 역 명  : 낭산배수지 건설사업 기본 및 실시설계용역

◦ 용역기간  : 2017. 5. 11 ~ 2018. 11. 1

◦ 용 역 비  : 553,740천원(시비)

◦ 용 역 사  : ㈜도화엔지니어링 박승우, ㈜퍼스트엔지니어링 이도행

◦ 용역내용  : 기본 및 실시설계 1식

▸배수지(V=8,200㎥), 송수가압장, 송․배수관로 L=2.0km(D450~500mm)

▸행정절차 이행(도시계획시설결정, 교통성 검토, 사전재해영향성 검토 등)

▸용지도 및 용지보상조서 작성

□ 상반기 추진실적

◦ 용역 발주 및 계약(조달청)            : 2017.  2 ~ 4월

◦ 용역 착수	: 2017.  5. 11.

◦ 용역 착수보고                         : 2017.  6. 13

□ 문제점 및 대책

◦ 낭산배수지 국가지정문화재구역협의(역사문화재과) : 2017. 6 ~ 7

□ 하반기 추진계획

◦ 용역 중간보고                        : 2017.  9월