전국체전담당관○○○○과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2017 예산집행실적
□	2017 주요성과
□	2017 주요업무결산

비전 및 중점추진방향

성숙한 시민의식

완벽한 대회준비

대회분위기 조성

체전과 문화․예술이 어우러지는 문화체전 승화

• 성숙된 시민의식

• 깨끗한 환경조성

• 안전한 선진교통

• 경기시설 완벽준비

• 체계적인 운영지원

• 기반편의시설 확충

• 자발적 시민참여

• 문화행사와 연계

• 적극적 체전 홍보

• 시민이 모두 함께 준비하고 참여하는	『화합체전』

• 백제문화유산과 스포츠가 어우러지는             『문화체전』

• 기존시설 활용으로 지역발전 견인하는           『경제체전』

• 선수·관람객 및 시민 안전과 편의를 지키는	『안전체전』

일   반   현   황

□ 기       구

							전국체전 담당관
체 전 기 획								체 전 운 영						체 전 시 설

□ 정 ․ 현 원

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	12	1	3	5	3
현 원	12	1	3	5	1	2
증 감					△2	2

□ 사 무 분 장

◦ 체전기획 : 전국체전(장애인) 기본 및 세부계획 수립, 대․내외 업무협력,

전국체전 운영위원회 구성 운영, 양대 체전 상황실 구성․운영 지원

◦ 체전운영 : 전국체전(장애인) 기본 및 세부계획 실행, 개․폐회식 운영,

전국체전 홍보 및 문화축제 지원, 시민서포터즈 운영,

성화봉송 지원

◦ 체전시설 : 종합운동장 및 종목별 경기장 개․보수, 경기장 공․승인,

경기장 시설점검 및 안전관리, 장애인 편의시설 확충

2017 예산집행 실적

【 2017. 10. 15. 현재 】                                      (단위 : 천원)

부서	정책		단위		세 부 사 업		예산액	집행액	잔 액	비율	비고
전국체전담당관							38,860,980	10,805,900	28,055,080	28
	2018년 전국체전						38,852,980	10,801,300	28,051,680	28
			2018년 전국체전 기반시설				38,558,080	10,630,460	27,927,620	28
				전국체전시설건립			34,554,080	9,919,360	24,634,720	29
				공공체육시설 장애인 편의시설 설치사업			2,140,000	711,100	1,428,900	33
				공공체육시설 개보수지원 (우 레 탄 교 체)			1,864,000	0	1,864,000	0
			2018년 전국체전 대회운영				294,900	170,850	124,050	58
						전국체전기획운영	294,900	170,850	124,050	58
	행정운영경비(전국체전담당관)						8,000	4,600	3,400	58
		기본경비					8,000	4,600	3,400	58
			기본경비				8,000	4,600	3,400	58

2017 주요성과

□ 성      과

◦ 2018년 성공적인 체전준비를 위한 기반 구축

▸전국체전담당관 신설                         : 2017. 01. 23.

▸종합운동장 개선공사 착공                   : 2017. 03. 20.

▸전국체전 및 전국장애인체전 로고송 선정          : 2017. 05 .16.

▸전국체전 및 전국장애인체전 종합상황실 구성    : 2017. 09. 06.

▸전국체전 및 전국장애인체전 기본계획서 배부   : 2017. 09. 12.

▸전국체전 및 전국장애인체전 D-365기념행사 실시   : 2017. 10. 12.

◦ 공모사업 선정 국비확보로 지방재정 확충 기여 : 1개 사업 932백만원

▸종합운동장 및 보조경기장 우레탄 교체 사업

◦ 전국체전 시민서포터즈 구성․운영

▸인원 : 2,018명(남1,148, 여870)

▸운영 : 각종 체육, 문화행사시 체전 홍보 12회 850여명

◦ 전국체전․전국장애인체전 익산시 운영위원회 구성

▸위원구성 : 70명 <위원장 – 시장(당연직)>

▸고    문 : 시의회의장, 국회의원, 도의원, 대학총장 등

▸부위원장 : 부시장, 교육장, 경찰서장, 소방서장, 체육회부회장 등

▸위    원 : 기관단체, 언론, 경제·의료·문화예술대표, 체육회 이사·감사 등

◦ 전국 4대체전 지역경제 파급효과 연구 용역

▸생산유발액 1,594억원 ▸부가가치유발액 655억원  ▸고용유발인원 2,617명

∙ 전국체육대회․전국장애인체육대회        : 2018. 10.

∙ 전국소년체육대회․전국장애학생체육대회  : 2019. 05.

∙ 전국생활체육대축전                    : 2020. 06.

□ 반      성

◦ 전국체전․전국장애인체전 참여분위기 확산 ⇒ 단계적 조성으로  화합체전 운영

▸익산 시민서포터즈･익산사랑운동추진협의회 거리캠페인 정례화

▸홍보시설물, 대중매체 등 활용, 각종 행사, 지역축제 등 연계홍보

2017 주요업무결산

		전국체전 종합운동장 개선공사 전국체전․전국장애인체전 운영 전국체전․전국장애인체전 홍보 추진 전국체전․전국장애인체전 시민서포터즈 운영 전국체전 숙박시설 확충 전국체전 개․폐회식 주차장 확보

1		전국체전 종합운동장 개선공사

□ 사 업 개 요

◦ 공 사 명 : 익산종합운동장 개선공사

◦ 위    치 : 익산시 무왕로 1397(익산종합운동장)

◦ 공사기간 : 2017. 3월 ~ 2018. 6월

◦ 공 사 비 : 336억(국비 101억 도비 90억 시비 145억)

◦ 대상시설

구 분	주경기장	실내체육관	보조경기장	비 고
연 면 적	13,684㎡	18,978㎡	20,500㎡
준공년도	1991년	1997년	2008년
용 도	관람집회시설	관람집회시설
수용인원	18,000명	6,000명

□ 추 진 실 적

◦ 종합운동장 개선공사 계약 체결                     : 2017. 03. 15.

◦ 종합운동장 개선공사 착공                          : 2017. 03. 20.

▸건설사업관리(감리) - 목양건축사사무소/길 건축사사무소

▸건축공사 - 흥한건설/성웅종합건설 ▸전기공사 - 금화전기

▸통신공사 - 썬더테크놀로지         ▸소방공사 - 대성전기공업사

◦ 완료공정

▸주경기장 기초보강 및 구조물 보강, 관람석 및 주요설비 철거완료

▸스탠드 우레탄 방수, 외부벽체 조적 및 미장공사 완료 등

※ 2017. 10. 13. 현 공정률 55% (계획공정률 45%)

◦ 종합운동장 개선공사 지역업체 및 지역자재 사용협약 : 2017. 04. 26.

□ 마무리 대책

◦ 종합운동장 개선공사 추진(계속)                    :  ~ 2018. 06.

▸종합상황실 설치 및 각 시도사무실 조성, 관람석 개선 등

▸육상 제1종 공인 우레탄 트랙 설치, LED전광판 및 성화대 제작 설치

▸전기, 통신, 소방, 기계설비 공사

2		전국체전·전국장애인체전 운영

□ 대 회 개 요

◦ 2018년 제99회 전국체육대회       :  2018. 10. 12 ~ 10. 18.(7일간)

▸참가인원 - 30,000여명(선수 20,000명, 임원 10,000명)

▸경기종목 - 14개 시･군 47개 종목 (익산시 14개 종목/개․폐회식)

◦ 2018년 제38회 전국장애인체육대회 :  2018. 10. 25 ~ 10. 29.(5일간)

▸참가인원 - 7,000여명(선수 5,000명, 임원 및 보호자 2,000명)

▸경기종목 - 14개 시･군 26개 종목 (익산시 7개 종목/개․폐회식)

□ 추 진 실 적

◦ 전국체전 및 전국장애인체전 성공개최를 위한 회의 개최   : 3회

◦ 전국체전 및 전국장애인체전 주개최지 벤치마킹(강릉,아산,충주)   : 2017. 02.~06.

◦ 전국 4대체전 지역경제 파급효과 연구 용역       : 2017. 03. 29.~05. 28.

◦ 전국체전 및 전국장애인체전 익산시 운영위원회 구성            : 2017. 05. 15.

◦ 전국체전 및 전국장애인체전 종합상황실 구성 및 운영           : 2017. 09. 06.

◦ 전국체전 및 전국장애인체전 기본계획서 배부 (시, 유관기관 등)  : 2017. 09. 06.

◦ 2017 전국장애인체전 개·폐회식 견학(충주)      : 2017. 09. 15.~09. 19.

◦ 전국(장애인)체전 운영 2018년도 본예산 부서별 통보        :  2017. 09. 19.

◦ 2018 전국장애인체전 채화장소 확정(미륵사지)              :  2017. 09. 28.

□ 마무리 대책

◦ 2017 전국체전 개·폐회식 견학(충주)            : 2017.10.20.~10. 26.

◦ 전국체전 및 전국장애인체전 종합상황반 보고회 개최    : 매월

◦ 전국체전 및 전국장애인체전 익산시운영위원회 창립 회의     : 2017. 11. 22.

◦ 2018 전국(장애인)체전 운영 예산 확보                 : 2017. 11.~12.

3		전국체전․전국장애인체전 홍보 추진

□  사 업 개 요

◦ 목    적 : 2018년 제99회 전국체전·제38회 전국장애인체전이 우리시에서

개최됨을 적극 홍보하여 시민모두 함께 준비하고 참여하는

화합체전으로의 분위기 극대화

◦ 홍보기간 :  2017. 01 ~ 2018.  10.

◦ 홍보내용 : 전국체전 추진 상황, 각종 체전관련 행사 등

◦ 홍보방법 : 언론, 버스래핑, 이벤트, 홍보물 제작 등

□ 추 진 실 적

◦ 전국체전 언론 홍보                              : 2017. 01.~09.

▸기획보도 3회 / 언론보도 36회

◦ 전국체전 개최 홍보 이벤트(페이스북)            : 2017. 03. 15.

◦ 기관․단체 전국체전 홍보 교육                 : 2017. 03.~06.

▸운수종사자 보수교육, 익산교육 아카데미, 지역민방위대장 등

◦ 전국체전 마스코트, 엠블럼, 포스터 공모(전북도)  : 2017. 05. 01.

◦ 전국체전 홍보 로고송 공모                     : 2017. 05. 22.

◦ 전국체전 및 전국장애인체전 대중교통 래핑 홍보     : 2017. 07.~12.

◦ 전국체전 및 전국장애인체전 홍보물 제작             : 2017.  08. 23.

◦  “가족모두 함께해요” 2018 익산 전국체전 이벤트 실시  : 2017. 09. 08.

◦ 제102회 대한예수교장로회 총회 전국체전 홍보       : 2017. 09. 18.

◦ 전국체전 및 전국장애인체전  D-day 카운터기 설치    : 2017. 10. 11.

◦ 시민과 함께하는 D-365 기념행사 실시          : 2017. 10. 12.

□ 마무리 대책

◦ 2017 전국체전 개최기간(충주) 홍보            : 2017.10.20.~10.26.

◦ 2017 시민 자전거 라이딩 행사 시 홍보            : 2017. 10. 21.

◦ 전국체전 및 전국장애인체전 홍보 동영상 제작   : 2017. 10. 30.

◦ 전국체전 성공개최기원 시민 걷기 대회 추진        : 2017. 11. 11.

4		전국체전․전국장애인체전 시민서포터즈 운영

□ 서포터즈 현황

◦ 운영기간 : 2017. 3. ~ 2019. 5.(소년체전 종료 시까지)

◦ 인    원 : 2,018명 (남 1,148명 /여 870명)

◦ 조직구성 : 단장, 부단장, 8개 분과위원

◦ 주요역할

▸전북도 시․군 전국대회 및 우리시 체육, 문화 행사시 체전 홍보

▸참가 선수단 환영․환송 행사 및 경기관람 응원 참여

□ 추 진 실 적

◦ 전국체전 시민서포터즈 모집                     : 2016.11.~2017.02.

◦ 제14회 익산 사랑의 전국마라톤대회 시민서포터즈 활동   : 2017. 04. 08.

◦ 제54회 전라북도 도민체육대회 시민서포터즈 활동  : 2017. 04. 28.

◦ 시민서포터즈 분과별 운영 간담회 실시             : 2017. 05. 10.

◦ 익산 서동축제 시민서포터즈 활동              : 2017.05.12.~05.14.

◦ 전국체전 시민서포터즈 발대식 개최                  : 2017. 05. 26.

◦ 세계 태권도 선수권대회 시민서포터즈 활동       : 2017. 06. 29.

◦ 익산시장기 전국리틀야구대회 시민서포터즈 활동        : 2017.  07. 05.

◦ 익산시장배 전국 동호인 족구대회 시민서포터즈 활동        : 2017.  09. 17.

◦ 전국체전 및 전국장애인체전 D-365행사 시민서포터즈 활동    : 2017.  10. 12.

□ 마무리 대책

◦ 제98회 전국체전(충주) 시민서포터즈 활동       : 2017.10.20.~10.26.

◦ 전국청소년 호국무예특공무술내회 시민서포터즈 활동  : 2017. 10. 21.

◦ 익산시장배 전국장애인 론볼대회 시민서포터즈 활동   : 2017. 11. 02.

5		전국체전 숙박시설 확충

□ 현     황

◦ 숙박시설

구 분	총 계	숙 박 업				청 소 년 수련시설	농어촌 민박	비 고 (농촌체험 휴양마을)
		소계	관광호텔	여관업	굿스데이
업소수	194	182	2	179	1	1	5	6
객실수	4,585	4,469	78	4,360	31	40	37	39
수용능력	9,617	8,938	156	8,720	62	248	185	246

◦ 숙박 현황 예상 분석(80% 가동률)

숙박예상 인원	수용가능 인원 (9,617명 × 80%)	부 족	비 고
8,500명	7,600명	900명

□ 추 진 실 적

◦ 전국체전대비 숙박업소 현황조사 (위생과)        : 2017.02.10.~02.23.

◦ 원불교 중도 훈련원 숙소 사용 협의 (252명)    : 2017. 03. 16.

◦ 숙박업소 사업주 전국체전 대비 교육(위생과)  : 2017. 04. 07.

◦ 컨벤션 호텔 신축 공사 착공(155실 400명)      : 2017. 06. 23.

◦ 여산 부사관 학교 숙소 사용 협의              : 2017. 09. 25.

▸교육생 숙소 3개동 900명 수용 확정(군수지원처)

□ 마무리 대책

◦ 제98회 전국체육대회(충주) 숙박시설 운영 견학   : 2017. 11월중

◦ 숙박업소  전국체전 대비 친절교육 (위생과)      : 2017. 11월중

6		전국체전 개․폐회식 주차장 확보

□ 사 업 개 요

◦ 개·폐회식 주차편의 제공으로 주차난 해소 및 원활한 차량소통 도모

◦ 주차수요(예상)

필요면수	주차장 운영			비 고
	계	종합운동장	임시주차장
4,400	5,470	800	4,670

□ 추 진 실 적

◦ 임시 주차장 확보 추진                          : 2017. 01. ~ 09.

구 분	규 모	산출근거	설치면수	비 고
계			4,670
쓰레기야적장 부지	30,000㎡	15㎡/대	2,000
신재생자원센터 주변도로(양측)	3,200m	6m/대	530
신재생자원센터 내 제2야적장부지	15,000㎡	15㎡/대	1,000
제2공단 내 19호 공원 축구장	8,700㎡	15㎡/대	580
공설운동장 야구장(흙구장)	8,440㎡	15㎡/대	560

□ 마무리 대책

◦ 제98회 전국체육대회(충주) 임시주차장 벤치마킹    : 2017. 10. 20.

◦ 도로변 임시 주차장 사용 협의(익산경찰서)         : 2017. 11월중

◦ 임시주차장(야적장) 예정지 현장 조사             : 2017. 12월중