국가식품클러스터담당관

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2017 예산집행실적
□	2017 하반기 성과 및 반성
□	2017 주요업무 추진상황

비전 및 중점추진방향

	비 전
글로벌 식품시장의 ‘新’중심 육성

		전 략 목 표
◦ ◦	식품클러스터의 신속한 구축 국내․외 유수기업 및 연구소 유치

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	동북아 식품시장 선점을 위한 식품전문산업단지의 차질 없는 공사추진 기업활동에 유리한 인프라 구축 및 국가식품클러스터 기반시설확충 3대 R&D 및 기업지원시설 운영으로 푸드폴리스 경쟁력 강화 최적의 기업 유치전략 마련 및 유치활동

일   반   현   황

□ 기          구

					국가식품클러스터담당관
	국가식품						유치홍보				지원협력

□ 정  ․  현  원

(단위 : 명)

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	13	1	3	4	5	-
현 원	11	1	3	3	3	1
증 감	△2	0	0	△1	△2	1

□ 사  무  분  장

◦ 국가식품	:	국가식품클러스터 기획조정, 국가예산확보 대내·외 산학연 교류 협력사업 추진 국가식품클러스터지원센터․기업지원시설 운영 관리 외국인투자지역 관리․운영
◦ 유치홍보	:	국내외 식품기업 및 연구소 투자 유치, 기술지원 홈페이지 관리, 국내․외 홍보전략 수립 홍보관 운영, 각종 홍보물 제작 및 홍보
◦ 지원협력	:	식품전문산업단지 조성지원, 산업단지 기반시설 확충 소스산업화센터 건립, 기업지원시설 장비구축 배후복합도시 및 2단계 조성

2017 예산집행실적

【 2017. 10. 15. 현재 】                                                                                                               (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율(%)	비고
국가식품클러스터담당관				40,796,113	19,154,497	21,641,616	47.0
	국가식품클러스터			40,766,769	19,134,936	21,631,833	46.9
		국가식품클러스터사업		40,766,769	19,134,936	21,631,833	46.9
			식품클러스터사업	114,110	50,632	63,478	44.4
			국가식품클러스터홍보관 운영	18,450	11,731	6,719	63.6
			투자유치 및 산학연 교류협력지원	4,050,800	2,118,850	1,931,950	52.3	▸명시이월액 12,000천원
			국가식품클러스터 지원센터운영 지원	4,747,200	3,136,000	1,611,200	66.1
			국가식품클러스터 기업지원 S/W사업	5,284,800	2,977,000	2,307,800	56.3
			국가식품클러스터 기업지원시설 운영관리	5,868,000	3,176,000	2,692,000	54.1	▸명시이월액 1,520,000천원
			국가식품클러스터 연구장비 구축지원	8,098,537	5,497,920	2,600,617	67.8	▸명시이월액 5,951,041천원 ▸사고이월액 297,496천원
			국가식품클러스터 외국인투자지역 지정	2,764,273	877,174	1,887,099	31.7	▸명시이월액 374,530천원
			소스산업화센터 건립	1,189,017	15	1,189,002	0	▸명시이월액 166,166천원
			소스산업화센터 건립(운영)	600,000	300,000	300,000	50.0
			소스 산업화센터 건립(시설)	6,400,000	0	6,400,000	0
			기업 이전비 지원	200,000	0	200,000	0
			지역투자촉진	1,411,582	988,107	423,475	70.0
			국가식품클러스터 기업유치 지원	20,000	1,507	18,493	7.5
	행정운영경비			29,344	19,561	9,783	66.7
		기본경비		29,344	19,561	9,783	66.7
			기본경비	29,344	19,561	9,783	66.7

2017 주요성과

□ 성      과

◦ 국가식품클러스터 산업단지 조성공사 추진

▸산업단지 조성공사 추진 (공정률 94%)

▸산업단지 1공구/2공구 준공	: ‘17. 2./9.

◦ 소스산업화센터 건립 사업 추진

▸소스산업화센터 개념설계 용역 추진	: ‘17. 2.

▸소스산업화센터 기본 및 실시설계용역 발주	: ‘17. 9.

◦ 국가식품클러스터 기반시설 확충

▸진입도로 공사 추진 (공정률 35%)	: ‘15. 2. ~

▸공공폐수처리시설 건설공사(공정률 99.3%)	: ‘15. 4. ~

▸왕궁배수지 건설공사 추진(공정률 96%)	: ‘16. 4. ~

◦ 투자유치 및 교류협력 활동 전개

▸분양계약체결(16건) : 에이디오인프라코어(14,876㎡/국내), 퍼스트바이오푸드

(11,688㎡/국내), 성진푸드(9,415㎡/국내), 한림지기(5,325㎡/국내) 등

▸투자유치 홍보관 운영(10회) : 서울머니쇼(5월), SIAL 캐나다 식품박람회(5월), 국제식품소재기술전(9월) 등

▸투자유치설명회(7회) : 광주․전남(5월), 부산․경남(10월) 등

◦ 식품전문학회 및 세미나 유치 (3회)                     : ‘17. 3. ~

▸한국식품과학회 관능검사 분과 심포지엄(6월), 한국식품영양과학회

산업심포지엄(9월), 한국포장학회 학술대회(10월)

◦ 기업R&D지원 사업 추진                                 : ‘17. 1. ~

▸ 기술개발지원, 기업 애로기술컨설팅 지원, 검사분석 및 시제품 제작 지원

▸ 국가식품클러스터지원센터 GMP(우수건강기능식품제조 및 품질관리기준) 인증 취득                                                       : ‘17. 9. 27.

□ 반      성

◦ 선도 기업 투자유치 저조

‣수도권 규제완화 및 산업경제 집중으로 대기업의 지방(충청권 이남) 투자 기피

‣산업단지 활성화를 위해 연관기업 동반 이전 효과가 큰 대기업 유치 필수

⇒ 중앙정부(농식품부) 대기업 유치활동 및 유인정책 발굴 지속 건의 및 전북도,

익산시, 지원센터, 지역 국회의원들과 공조하여 대기업 유치에 최선의 노력을

다하겠음

2017 주요업무결산

		국가식품클러스터		1단계 식품전문산업단지 조성
		국가식품클러스터		기반시설 확충
		국가식품클러스터		정부기업지원시설 운영
		국가식품클러스터		투자유치 및 교류협력
		국가식품클러스터		외국인투자지역 관리
		소스산업화센터 건립

1		국가식품클러스터 1단계 식품전문산업단지 조성

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2009년 ~ 2017년(9년)

◦ 위    치 : 익산시 왕궁면 흥암리, 광암리, 동촌리 및 왕궁리 일원

◦ 총사업비 : 3,119억원(용지비 800, 공사비 2,119, 기타 200)

◦ 사업내용 : 국가식품전문산업단지 조성 232만㎡(70만평)

▸ 산업시설용지(제조,연구,물류) 460천평, 상업용지 8천평, 주거용지 23천평

▸ 지원시설용지 27천평, 기반시설용지(도로,공원,폐수처리장 등) 182천평

◦ 사업시행자 : LH공사

□ 추 진 실 적

◦ 산업단지 조성공사 추진	: ‘14.  3. ~

▸ 공정률 94%(1공구 100%, 2공구 100%, 3공구 84.2%)

◦ 국가식품클러스터 산업단지 1공구/2공구 준공      : ‘17. 2. / 9.

◦ 제19대 대선공약사업(2단계, 배후도시) 제출         :＇17. 3.

◦ 배후도시 포함 익산시 중장기 지역발전구상 용역 추진(LH공사)

: ‘17. 4. ~

◦ 국가식품클러스터 계획 변경 승인·고시(3차)              : ‘17. 8. 30.

◦ 산업단지 4차/5차 분양공고(LH공사)                    : ‘17. 9. 6./9. 29.

□ 마무리 대책

◦ 국가식품클러스터 식품전문산업단지 준공            : ‘17. 12.

◦ 배후도시 건설사업 사업시행자 선정을 위한 관계기관 참여 유도

▸ LH공사, 전북개발공사 등에 개발 위․수탁 협의

2		국가식품클러스터 기반시설 확충

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2013년 ~ 2019년(7년)

◦ 위    치 : 국가식품클러스터산업단지 일원

◦ 총사업비 : 976원(국비 692, 지방비 84, 민자 200)

(단위:억원)

구 분	시설규모	사 업 비				예산 확보액			관리부처 (사업시행자)
		합계	국비	지방비	민자	‘16년 까지	‘17년	‘18년 이후
합 계		976	692	84	200	국 비 387 지방비 84 민 자 157	국 비 88	국 비 217 지방비 0 민 자 43
진입도로	L=4.1km, 4~6차선	432	432	-	-	국 비 208	국 비 88	국 비 136	익산지방 국토관리청
용수공급 시 설	배수지 Q=8.8천㎥/일	84	-	84	-	지방비 84	-	-	익 산 시
	송수관로 D=600mm, L=10.5km	110	36	-	74	국 비 36 수 공 74	-	-	수자원공사 (준공)
공공폐수 처리시설	Q=10천㎥/일	350	224	-	126	국 비143 LH공사 83	-	국 비 81 LH공사 43	LH공사

□ 추 진 실 적

◦ 국가식품클러스터 진입도로 공사 추진(공정율 : 35%)  : ‘15.  2. ~

◦ 공공폐수처리시설 건설공사 추진(공정율 : 99.3%)     : ‘15.  4. ~

◦ 왕궁배수지 건설공사 공사 추진(공정율 : 96%)        : ‘16.  4. ~

□ 마무리 대책

◦ 왕궁배수지 건설공사 준공(익산시)                   : ‘17.  11.

◦ 공공폐수처리시설 건설공사 준공(LH공사)            : ‘17.  12.

◦ 국가식품클러스터 진입도로공사 준공(익산국토청)     : ‘19.  12.

3		국가식품클러스터 정부기업지원시설 운영

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2014년~ 2020년

◦ 총사업비 : 1,754억원(국비 1,285, 지방비 303, 민자 166)

(단위:억원)

구 분	예 산				비고
	합 계	‘16년까지	‘17년	‘18년이후
합 계	1,754	323	128	1,303
장비비	410	270	19	121
운영비	516	32	43	441
S/W사업	828	21	66	741

◦ 사업내용

▸H/W 6개사업 : 품질안전센터, 기능성평가지원센터, 패키징센터, 벤처센터, 파일럿플랜트, 지원센터

▸S/W 10개사업 : 식품상품화 R&BD지원, 기능성식품개발․육성 및 인력양성 등

▸장비구축 : 571종 410억원 구축

□ 추 진 실 적

◦ 정부기업지원시설 장비구축                            : ‘17. 1. ~

▸ ‘17년 10월까지 : 445종 262.9억원 구축 완료

◦ 기업R&D지원을 위한 전문코디네이터 지원사업 추진     : ‘17. 1. ~

▸기술개발지원사업(28건, 공동연구11, 선행기술개발1, 취업연계1, 국제

공동2, 벤처기업기술지원13), 기업 애로기술컨설팅 지원(26건), 산학연

연구전담부서 설치지원(4건), 해외우수연구인력 교류협력지원(2건),          검사․분석(614건) 및 시제품 제작지원(58건) 수행 중

□ 마무리 대책

◦ 정부기업지원시설 운영 및 장비 구축                   : ‘17. 10. ~

▸ ‘17년 : 2종(26억원), ‘18년 이후 : 124종(121.1억원)

◦ 기업R&D지원을 위한 전문코디네이터 지원사업 추진     : ‘17. 10. ~

4		국가식품클러스터 투자유치 및 교류협력

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2017. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 38억원(국비 19, 도비 5.7, 시비 13.3)

◦ 사업내용

▸ 국내‧외 식품기업 투자유치

▸ 국내‧외 투자유치관 운영 및 투자유치 연계홍보

▸ 산학연 R&D네트워크 구축, 식품클러스터 국제컨퍼런스 및 심포지엄

□ 추 진 실 적

◦ 분양계약 체결

▸ 분양계약체결(16건) : 에이디오인프라코어(14,876㎡/국내), 퍼스트바이오푸드(11,688㎡/국내), 성진푸드(9,415㎡/국내), 한림지기(5,325㎡/국내), 유니온테크(3,810㎡/국내) 등

◦ 투자유치 홍보관 운영(10회)

▸ 국내(6회) : 서울머니쇼(5월), 서울국제식품산업대전(5월), 부산국제

식품대전(6월), 국제식품소재기술전(9월), 전주국제발효식품엑스포

(10월), 국제건강기능식품학회(10월)

▸ 국외(4회) : SIAL 캐나다 2017 식품박람회(5월), 홍콩 HOFEX 2017

식품박람회(5월), SIAL CHINA 2017(5월), Wellness Food Japan

식품박람회(7월)

◦ 투자설명회 개최(7회)

▸ 국내(6회) : 광주․전남(5월), 서울(5월), 익산(5월), 제주도(6월), 대구(9월),

부산․경남(10월)

▸ 국외(1회) : 말레이시아(7월)

◦ 투자유치 연계홍보

▸ 온라인홍보, 지면광고 : 홈페이지, SNS, 블로그 등

▸ 기획기사 게재(5회) : 머니투데이(3회), 코리아타임즈(2회)

▸ 지역거점홍보 : 인천공항, KTX역사(용산역, 익산역), 고속도로 등

▸ 라디오광고 송출 : 출퇴근시간대 6월부터 2개월간 40초 캠페인 송출

▸ 대중교통(고속버스, 시내버스)활용 홍보

▸ 국내외 투자유치관 지원 홍보 : 기념품 제작, 리플릿 및 브로셔 등

◦ 국가식품클러스터 자문위원회 운영 (3회)               : ‘17. 4. ~

▸ 구성 : 농식품부 식품산업정책실장, 전라북도 행정부지사, 익산시장, 지원센터장, 산학연 전문가 등 25명

▸ 운영 : 분기1회(4,7,9월), 국가식품클러스터 추진상황 종합관리, 중장기 발전 방향 모색 등 정책 조율 및 공감대 형성

◦ 식품전문학회 및 세미나 유치 (3회)                    : ‘17. 3. ~

▸한국식품과학회 관능검사 분과 심포지엄(6월)

▸한국식품영양과학회 산업심포지엄(9월)

▸한국포장학회 학술대회(10월)

◦ 국가식품클러스터지원센터 GMP(우수건강기능식품제조 및 품질관리기준) 인증 취득                                                               : ‘17. 9. 27.

□ 마무리 대책

◦ 국내 투자유치 활동                                   : ‘17. 10. ~

▸ 식품기업 방문(수시) 및 투자컨설팅(협력기관/자문관) 운영

▸ 투자설명회 개최 : 4회(국내 주요 식품기업·연구소 관계자 초청)

◦ 국외 투자유치 활동                                   : ‘17. 10. ~

▸ 투자설명회 개최(3회) : 캐나다, 일본, 홍콩

▸ 투자유치관 운영(1회) : FI EUROPE 2017(프랑크푸르트 식품자연원료 박람회)

◦ 투자유치 연계홍보	: ‘17. 10. ~

▸ 주요행사에 맞춰 기획기사 게재 및 TV광고 송출

▸ KTX역사(용산역, 익산역) 지속적인 거점 홍보

▸ 대중교통 활용 홍보

◦ 제7회 식품클러스터 국제컨퍼런스 개최(익산)             : ‘17. 11. 15.

5		국가식품클러스터 외국인투자지역 관리

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2016년 ~ 2017년(2년)

◦ 위    치 : 국가식품클러스터 산업단지 내

◦ 사 업 비 : 179억원(국비 107, 도비 22, 시비 50)

◦ 규    모 : 116,000㎡(35천평)    * 추후 입주수요 등을 고려하여 확장 예정

◦ 운    영 : 산업부, 전라북도와 익산시가 부지 공동 매입하여 외국기업에 임대

◦ 관리위탁 : 한국산업단지공단

▸ 예산현황

(단위:백만원)

구 분	계	2016년	2017년	비고
계	17,947	9,179	8,768	100%
국 비	10,768	6,258	4,510	60%
도 비	2,154	1,293	861	12%
시 비	5,025	1,628	3,397(2,389)*	28%

*시비 약 10억원 미확보 상태이며 향후 외국인투자기업 임대계약시 추경예산 확보

□ 추 진 실 적

◦ 산업부, 외국인투자지역 관리기본계획 승인                   : ‘16.  1.  8.

◦ 외국인투자지역 용지매매 계약금(628백만원) 납부             : ‘16.  2. 15.

◦ 프라하골드 임대계약 체결(16,500㎡)토지대금(625백만원) 납부  : ‘16. 10. 18.

◦ 코아바이오 임대계약 체결(23,140㎡)토지대금(877백만원) 납부  : ‘17.  1. 24.

□ 마무리 대책

◦ 외국인투자기업 임대계약 체결 후 토지대금 집행       : ‘17. 10. ~

6		소스산업화센터 건립

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2016년 ~ 2018년(2년)

◦ 위    치 : 국가식품클러스터 산업단지 내(S2)

◦ 사 업 비 : 82억원(국비 69, 지방비 13)

◦ 규    모 : 부지 6,588㎡(1,993평), 건축 724㎡(219평)

◦ 시설내역 : 전처리실, 계량실, 쿠킹실, 포장공급실, 충전실, 포장실, 보관실 등

◦ 주요기능

▸ 소스산업 정보센터(레시피, 수출 및 산업정보 등) 구축

▸ 중소식품기업 애로기술 해소 지원(R&BD 네트워킹)

▸ 주문자 수요 시제품 생산지원(ODM*방식)

* ODM(Original Development Manufacturing) : 주문자 요구 기술 개발․생산

□ 추 진 실 적

◦ 소스산업화센터 개념설계용역	: ‘17.  2. ~ 6.

◦ 소스산업화센터 산학연 네트워크 자문회의 개최(2회)    : ‘17.  8. ~ 9.

◦ 소스산업화센터 기본 및 실시설계용역 발주	: ‘17.  9.

□ 마무리 대책

◦ 소스산업화센터 산학연 네트워크 자문회의 3차 개최    : ‘17. 10.

◦ 소스산업화센터 건립공사 착공 및 준공                : ‘18. 1. ~ 12.

◦ 소스산업화센터 운영                                 : ‘19. 1.